2010. 1

주 요 업 무 보 고

환 경 사 업 소

목        차

□ 일 반 현 황
□ 2009 주요업무 결산
□ 2010 중점 추진방향
□ 2010 주요업무 계획
◦ 효율적, 체계적 하수․분뇨처리
◦ 공공하수처리시설(설비) 완벽관리 추진
◦ 마을하수처리시설 효율적 운영관리
◦ 운봉․인월처리장 총인(T-P)처리시설 설치사업
◦ 하수슬러지 처리시설 설치사업 추진

일  반  현  황

□ 기    구

																		환경사업소장
																		황 순 석
하수관리담당																				하수처리담당																												시설보수담당
왕 길 성																				최 종 열																												오 태 현
◦행정종합계획수립조정 ◦회계․시설물 관리																				◦남원하수처리장 운영 ◦처리시설 개량 및 확충																												◦운봉․인월하수처리장 운영 ◦마을하수처리시설 운영

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기 능	비 고
정 원	22	1	3	2	3	2	11
현 원	20	1	3	6	1		9	청 경 2 미화원 2
증 감	△2			4	△2	△2	△2	결 원 2

□ 시설현황

시 설 명	위 치	면적(㎡)	처리용량(㎥/일)	처리방법
남원하수처리장	주생면 중동리 255	40,016	50,000	SymBio공법
운봉하수처리장	운봉읍 북천리 2-2	3,735	800	2A2O공법, SBR반응조
인월하수처리장	인월면 중군리 38	3,616	1,000	2A2O공법, SBR반응조
소규모하수처리시설	산내 백일외 53개소	19,995	3,918	혐기․호기 접촉산화법 등

2009년 주요업무 결산

	청정남원 실현
◦ 고도처리시설 및 국립공원내 마을하수도 정비 완료로 하천수질 개선 ◦ 체계적인 처리시설 관리와 사전 예방점검․정비로 365일 무사고 운영

□ 하수처리시설 개선으로 안정적인 수질관리 체계 구축

◦ 남원하수처리장 하수고도처리사업 완료 : 2009. 12

☞ 사업기간 : 2005～2009(5년)/사업비 : 8,681백만원(국도비6,641 시비2,040)

◦ 국립공원내 소규모하수처리시설 개선사업 준공 : 4개소/2,560백만원

☞ 대상지구 : 반선(490㎥/일), 달궁(490㎥/일), 덕동(200㎥/일), 학천(200㎥/일)

□ 소규모 하수처리시설의 효율적인 운영관리로 농촌지역 환경보전

◦ 상시 순회점검반 운영으로 체계적인 시설관리 : 방류수 수질검사 병행

◦ 실시간 무인원격제어시스템 구축  :  35개소

□ 시설의 사전 점검․정비 및 예방행정으로 무재해․무사고 운영

◦ 하수처리시설 사전 점검․정비     :  25회

◦ 하수처리시설 소규모 보수정비 등  :  32건 / 148백만원

□ 저탄소 녹색성장을 위한 태양광 발전시설(100KW) 설치 운영

◦ 연간 절감효과 : 전기요금 12백만원, 원유대체효과 43톤

	주 요 성 과
◦ 수질 개선 및 슬러지처리시설 설치 국비확보 : 681백만원 ☞ 슬러지처리시설 500, 운봉․인월 처리장 총인처리시설 181 ◦ 주변마을 기술지원으로 시민과 친숙한 친환경 녹색시설 구축

2010 중점 추진 방향

건강하고 생명력 있는 하천 수질보전

	중 점 과 제
◦ 하수처리시설 관련사업 완벽 추진 ☞ 하수슬러지 처리시설 설치공사의 완벽한 시공관리 ☞ 운봉․인월 하수처리장 고도화 처리(인제거)시설 설치 ◦ 하수처리시설의 방류수 수질기준 준수로 청정하천 수질보전 ☞ 체계적인 수질분석 및 효율적인 시설운영 관리 ☞ 처리시설 사전 점검․정비로 365일 무재해․무사고 시설운영 ◦ 친환경 녹색성장에 기초한 환경친화적 테마공원 조성 ☞ 견학로 및 편의시설 등 현대화로 효율적인 공간 확보 ☞ 주민 친화적인 친환경 휴식 공간 제공

맑고 깨끗한 하천수질 보전      전국 제일의 청정남원 실현

2010 주요업무 계획

효율적, 체계적 하수 ․ 분뇨처리

□ 개    요

◦ 공공하수처리시설   ──────────────────   3개소

▸ 남 원  :  50,000㎥/일, SymBio공법

▸ 운 봉  :     800㎥/일, 2A2O공법(SBR계열)

▸ 인 월  :   1,000㎥/일, 2A2O공법(SBR계열)

◦ 분뇨처리시설  ─────  50㎘/일, B3공법(하수 연계처리)

※ 침출수처리 ─────  대산․주생․운봉매립장(하수 연계처리)

□ 추진계획

◦ 체계적인 수질관리 및 효율적인 시설 운영으로 연중 방류수 수질기준 준수

▶ 수질 정밀분석과 데이터 관리로 체계적인 처리시스템 운영

- 정기검사  :  유입수, 방류수 등 9개 항목(매일)

- 수시검사   :  처리공정별 슬러지 및 수질검사, 탈수케익 함수율 등

◦ 시설의 사전 점검․정비로 365일 무사고 운영

- 자체점검  :  매주 금요일

- 점검대상  :  기계, 전기, 구조물, 제어시스템 등

◦ 처리공정별 자동제어설비 운영으로 관리효율 극대화

- 각 공정별 실험데이터 자료에 의한 하수처리 스케줄 조정

□ 기대효과

◦ 시설 유지보수 노하우 및 각종 데이터 공유로 효율적인 하수처리 방안 마련

◦ 방류수 수질기준 및 오염총량제 확정배출량 등 관련법규 준수

◦ 완벽한 하수처리로 자연환경 보전 및 친환경 녹색성장에 기여

공공하수처리시설(설비) 완벽관리 추진

□ 개    요

◦ 남원․운봉․인월 하수처리시설           :  기계류 및 구조물 71종

◦ 시설보수용 장비                         :  10종,  43개

◦ 응급조치 장비(비상발전기)                :  2대(500kw, 60kw)

□ 추진계획

◦ 각종 기계, 전기류 등 수시 및 정기 자체점검 실시

▸ 수    시  :  매일(각종 설비 가동 여부 및 소모품 교체 등)

▸ 정    기  :  반기별 1회(구조물, 건축, 배관, 전기 점검 등)

◦ 노후시설물 집중관리로 위험요소 사전제거 및 정비  :  수시

▸ 정비내용  :  침사제거기, 조목스크린, 최초침전지 수집기, 탈수기 등

◦ 남원처리장 TMS(수질원격자동측정기) 위탁관리 추진 :  30백만원/년

▸ 위탁시기  :  2010. 2월중

▸ 관리내용  :  자동측정 장비 관리 및 각종 센서류 점검․정비 등

◦ 운봉․인월 처리장 시설물 상시 관리체계 구축

▸ 무인원격시스템에 의한 자동 감시 및 현장 점검 병행 추진

□ 기대효과

◦ 시설의 사전 점검․정비로 안전사고 요인 제거 및 시설 가동률 극대화

◦ 노후시설물 개량 등으로 신속하고 쾌적한 근무여건 조성

◦ 남원처리장 방문객에게 안전하고 쾌적한 환경체험 학습장 제공

※ 남원처리장 노후시설 개량사업 등 2010 추경예산 반영 요망 : 1,460백만원

마을하수처리시설 효율적 운영관리

□ 개    요

◦ 처 리 시 설   :  54개소(처리용량  ⇒  3,918㎥/일)

▸ 섬진강수계  :  31개소 ⇒  1,629㎥/일

▸ 낙동강수계  :  23개소 ⇒  2,289㎥/일

◦ 처 리 공 법  :  생물학적 처리공법 등

□ 추진계획

◦ 환경청 지도․점검 대비 마을하수처리시설 집중관리  :  12개소

▸ 점 검 자  :  반기 1회, 전주지방환경청(새만금유역관리단)

▸ 점검내용  :  수질검사 등 시설물 관리 상태 및 관리대장 등

▸ 관리대상  :  사석,방동,세전,송내,양평,옹정,대곡,하신,부운,부절,방촌,상귀

◦ 자체수질검사     주 1회 (법정시설)   :  12개소

월 1회 (비법정시설)   :  42개소

◦ 마을하수처리시설 상시 순회점검반 운영(54개소)  :  수시

▸ 점 검 반  :  2개반 4명

▸ 점검내용  :  처리시설 정상가동 여부 및 유입․방류수질 확인 등

□ 기대효과

◦ 농어촌 마을하수의 완벽처리로 수질오염 예방 및 환경보전 기여

운봉․인월처리장 총인(T-P) 처리시설 설치사업

□ 개    요

◦ 사 업 명  :  운봉․인월처리장 총인(T-P) 처리시설 설치사업

◦ 총사업비  :  259백만원(국비 181, 시비 78)

◦ 사업기간  :  2010. 1～12

◦ 처리장별 사업내용

(단위:㎥/일,백만원)

구 분	위 치	시설용량(㎥/일)	총사업비	국비	시비
계			259	181	78
운봉	운봉읍 북천리	800	149	104	45
인월	인월면 중군리	1,000	110	77	33

□ 추진계획

◦ 기본 및 실시설계                               :  2010. 2～4

◦ 설치인가(전라북도 수질보전과)                    :  2010. 5

◦ 재원협의(환경부, 전주지방환경청)                :  2010. 6

◦ 공사 발주 및 착공                              :  2010. 7～8

◦ 종합 시운전 및 공사 준공                       :  2010. 11

□ 기대효과

◦ 주요 하천 조류발생 등 부영양화 방지로 청정 하천 유지

하수슬러지 처리시설 설치사업 추진

□ 개    요

◦ 위    치   :   남원시 주생면 중동리 255(환경사업소 내)

◦ 사 업 명   :   남원시 하수슬러지 처리시설 설치사업

◦ 사업기간   :   2008～2010(3년)

◦ 처리용량   :   30톤/일

◦ 총사업비   :   5,700백만원(국비 3,990,  시비 1,710)

□ 추진실적

◦ 설치계획 수립                                   :  2007. 4

◦ 행정절차 이행(투․융자 심사, 변경인가 등)        :  2008. 2～2009. 4

◦ 기본 및 실시설계                                :  2008. 7～12

◦ 설계내용 기술심사(환경부, 도, 전문기관 등)       :  2009. 3～5

◦ 공사 발주의뢰                                   :  2009. 7

◦ 공사 착공 및 1차분 공사완료                     :  2009. 10～12

▸ 관급자재(처리설비) 구입, 토목(건축) 일부 시공 등

□ 추진계획

◦ 총 사업비 변경신청(환경부)                      :  2010. 2

◦ 최종분(2차분) 공사 추진 및 준공                 :  2010. 1～12

▸ 관급자재(2차분) 구입, 토목(건축), 전기(제어), 소방, 통신 등