2010. 11.

주 요 업 무 보 고

환 경 사 업 소

목       차

□ 일 반 현 황
□ 2010 주요업무 결산
□ 주요업무 추진상황
◦ 효율적, 체계적 하수 ․ 분뇨처리
◦ 공공하수처리시설(설비) 완벽관리 추진
◦ 하수슬러지 처리시설 설치사업 추진
◦ 운봉 ․인월처리장 총인 처리시설 설치사업
◦ 마을하수처리시설 효율적 운영관리
◦ 남원하수처리장 현장 체험학습장 운영

일  반  현  황

□ 기    구

																		환경사업소장
																		김 광 호
하수관리담당																				하수처리담당																												시설보수담당
왕 길 성																				최 종 열																												오 태 현
◦행정종합계획수립조정 ◦회계․시설물 관리																				◦남원하수처리장 운영 ◦처리시설 개량 및 확충																												◦운봉․인월하수처리장 운영 ◦마을하수처리시설 운영

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기 능	비 고
정 원	22	1	3	2	3	2	11
현 원	20	1	3	6	1	2	7	청 경 2 미화원 2
증 감	△2			4	△2		△2	결 원 2

□ 시설현황

시 설 명	위 치	면적(㎡)	처리용량(㎥/일)	처리방법
남원하수처리장	주생면 중동리 255	40,016	50,000	SymBio공법
운봉하수처리장	운봉읍 북천리 2-2	3,735	800	2A2O공법, SBR반응조
인월하수처리장	인월면 중군리 38	3,616	1,000	2A2O공법, SBR반응조
소규모하수처리시설	산내 백일외 53개소	19,995	3,918	혐기․호기 접촉산화법 등

2010년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 하수슬러지 처리시설을 저탄소 녹색성장을 위한 재활용시설로 추진 ◦ 체계적인 수질관리시스템 구축으로 365일 방류수 수질기준 준수

□ 하수슬러지 처리시설 설치사업 추진 및 노후시설 개선

◦ ‘11년 이후 하수슬러지 해양투기 금지로 처리시설 설치사업 추진

▸ 처리용량 : 30톤/일,  총사업비 : 5,937백만원(국비 4,156 시비 1,781)

◦ 노후시설 개선 및 관리사무실 환경정비 / 153백만원

▸ 유입동 침사제거기 및 조목스크린 정비 등 : 128백만원

▸ 관리사무실 확장 및 내부 인테리어로 쾌적한 근무환경 조성 : 25백만원

□ 체계적이고 효율적인 수질관리시스템 구축으로 하천수질보전

◦ 수질검사에 의한 데이터에 따라 과학적인 처리시설 관리체계 확립 : 연중

◦ 수질TMS 운영 등 방류수 수질기준 365일 준수로 하천오염 예방 : 연중

◦ 시설의 사전 점검․정비 및 예방행정으로 무재해․무사고 운영  : 주1회

□ 소규모 하수처리시설의 효율적인 운영관리로 농촌지역 환경보전

◦ 연중 순회점검반의 체계적 시설관리 및 방류수 수질검사 실시 : 54개소

◦ 처리시설 개선 등을 위한 기술진단 : 2개소

주요업무 추진상황

효율적, 체계적 하수 ․ 분뇨처리

□ 사업개요

◦ 공공하수처리시설   ──────────────────   3개소

▸ 남 원  :  50,000㎥/일,  SymBio공법

▸ 운 봉  :     800㎥/일,  2A2O공법(SBR계열)

▸ 인 월  :   1,000㎥/일,  2A2O공법(SBR계열)

◦ 분뇨처리시설  ─────  50㎘/일,  B3공법(하수 연계처리)

※ 침출수처리 ─────  대산․주생․운봉매립장(하수 연계처리)

□ 추진실적

◦ 철저한 수질관리로 연중 방류수 수질기준 준수

(단위 : ㎥/일, ㎎/L)

구 분			하수처리시설			분뇨	매립장 침출수
			남원	운봉	인월
처 리 량			43,442	1,619	657	13.8	354.6
수질	BOD	유입	78.9	42.9	51.6	4,745	84.4
		방류	3.1	1.8	1.3	하수 연계처리	하수 연계처리
	SS	유입	82.9	43.0	77.5	9,095	86.3
		방류	1.6	1.8	1.0	하수 연계처리	하수 연계처리

□ 금후계획

◦ 체계적인 수질관리 및 효율적인 시설 운영으로 연중 방류수 수질기준 준수

▸ 수질 정밀분석과 데이터 관리로 체계적인 처리시스템 운영

- 정기검사  :  유입수, 방류수 등 9개 항목(매일)

- 수시검사   :  처리공정별 슬러지 및 수질검사, 탈수케익 함수율 등

◦ 시설의 사전 점검․정비로 365일 무사고 운영

- 자체점검  :  매주 금요일

- 점검대상  :  기계, 전기, 구조물, 제어시스템 등

공공하수처리시설(설비) 완벽관리 추진

□ 사업개요

◦ 남원․운봉․인월 하수처리시설          :  구조물 및 기계․전기류

◦ 시설보수용 장비                        :  10종, 43개

◦ 응급조치 장비(비상발전기)               :  2대(500kw, 60kw)

□ 추진실적

◦ 각종 기계․전기류 등 수시 점검 및 자체보수

▸ 펌프류, 최초침전지 수집기, 배관, 전기부품 교체 등

◦ 하수처리장 노후시설물 정비  :  17건, 128백만원

▸ 정비사항  :  침사제거기, 최초침전지, 탈수기 부대설비 등

◦ 운봉․인월처리장 구조물 정밀점검 용역  :  9백만원

▸ 구조물 정밀진단 결과 문제점 없음

□ 금후계획

◦ 하수처리장 시설정비(3건/28백만원)               :  2010. 10～11

▸ 남원처리장 유입동 협잡물 이송콘베어 교체(15백만원)

▸ 운봉․인월처리장 드럼스크린 및 펌프류 등 정비(13백만원)

◦ 자동제어 현장센서 및 시스템 정기점검              :  매월

◦ 기계․전기 각종 소모품 교체 및 시설물 안전관리  :  매주

하수슬러지 처리시설 설치사업 추진

□ 사업개요

◦ 사 업 명   :   남원시 하수슬러지 처리시설 설치사업

◦ 사업기간   :   2008～2011

◦ 처리용량   :   30톤/일

◦ 총사업비   :   5,937백만원(국비 4,156, 시비 1,781)

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계	:  2008. 7～12

◦ 설계내용 기술심사(환경부, 도, 전문기관 등)	:  2009. 3～5

◦ 공사 발주의뢰	:  2009. 7

◦ 공사 착공 및 1차분 공사완료(기계, 토목 일부 시공)            :   2009. 12

◦ 공사 2차분 공사완료(기계, 전기, 계측제어, 감리)        :  2010. 6

▸ 공정율 : 47%

□ 금후계획

◦ 공사 3차분 추진(탄화설비, 대기방지시설 등)	:  2010. 8～11

▸ 예상 공정율 : 60%

◦ 공사 4차분 추진(기계, 건축, 자동제어 등) 및 준공	:  2011. 2～8

※ ‘10년 시비 미반영분(379백만원)을 포함하여 ’11년 시비 878백만원 반영

건의(‘11년 국비 1,165백만원)

운봉․인월처리장 총인 처리시설 설치사업

□ 사업개요

◦ 사 업 명  :  운봉․인월처리장 총인(T-P) 처리시설 설치사업

◦ 사업기간  :  2010. 1～12

◦ 총사업비  :  259백만원(국비 181, 시비 78)

◦ 처리장별 사업내용

(단위:㎥/일,백만원)

구 분	위 치	시설용량	총사업비	국비	시비
계			259	181	78
운봉	운봉읍 북천리	800	149	104	45
인월	인월면 중군리	1,000	110	77	33

□ 추진실적

◦ 하수처리시설 개선사업 수요파악(환경부)          :  2009. 6

◦ 사업계획 수립 및 신청(남원시 ⇒ 환경부)         :  2009. 7

◦ 설치사업을 위한 국비지원 신청                   :  2009. 7

◦ 사업계획 확정(환경부)                           :  2009. 12

◦ 기본 및 실시설계 완료                           :  2010. 9. 13

◦ 변경 인가 및 재원협의(도청, 전주지방환경청)      :  2010. 9. 15

□ 금후계획

◦ 총사업비 변경신청                               :  2010. 10

▸ 259백만원 ⇒ 354백만원(증 95백만원)

◦ 공사 발주 및 착공                               :  2010. 10

◦ 종합 시운전 및 공사 준공                        :  2010. 12

마을하수처리시설 효율적 운영관리

□ 사업개요

◦ 처 리 시 설    :  54개소(처리용량  3,918㎥/일)

▸ 섬진강수계   :  31개소, 1,629㎥/일

▸ 낙동강수계   :  23개소, 2,289㎥/일

◦ 처 리 공 법   :  생물학적 처리공법 등

□ 추진실적

◦ 수질개선을 위한 수질검사 및 상시 점검․정비   :  54개소

▸ 수질검사  :  주1회(27개소), 월1회(27개소)

▸ 처리시설 배관 및 각종 기계․펌프류 정비 등  :  35회

◦ 처리시설 기술진단 실시(부운, 세전)   :  19백만원

▸ 진단내용 : 처리시설 적정운영 및 수질개선 방향 제시

□ 금후계획

◦ 처리시설 순회점검반 운영(1개반 3명)    :  매일

▸ 처리시설 정상가동 여부 및 유입․방류수질 확인 등

◦ 부운공공하수처리시설 수해(8.12～8.18) 복구  :  57백만원

▸ 침수된 자동제어시스템 교체 및 기계․펌프류 정비 등

□ 문제점 및 대책

◦ 마을하수도(54개소) 점검 인력 및 차량 부족으로 비상 응급대처 미흡

☞ 기술인력 2명(전기․환경직렬) 및 차량 1대(‘11년 정수 확보) 필요

◦ 무인원격제어시스템 미설치 시설 운영관리 지난

☞ 미설치(8개소)시설 설치 사업비 ‘11년 본예산 반영 요망(200백만원)

◦ 대부분 시설이 노후되어 시설장비 유지비 절대 부족

☞ 시설장비 유지비 확보 필요(70백만원)

남원하수처리장 현장 체험학습장 운영

하수처리시설을 친환경 저탄소 녹색성장 시설로 구축하여 현장

체험학습장으로 활용 주민휴식 및 친화시설로 전환하고자 함

□ 사업개요

◦ 시 설 명  :  남원하수처리장

◦ 운영기간  :  2010. 4～12(9개월)

◦ 대    상  :  관내 초․중고교, 유치원 및 어린이집 등

◦ 주요내용  :  하수처리과정 프리젠테이션 설명 및 현장학습 등

□ 추진실적

◦ 시설정비 완료(중앙통제실)                          :  2010. 1

▸ 음향시설 및 빔프로젝트 설치 등

◦ 홍보물 제작(안내책자 1,500부, 프리젠테이션 등)      :  2010. 3

◦ 시설견학 안내 및 홍보물 발송                       :  2010. 4

▸ 관내 유치원, 어린이집, 초․중․고교 등(175개소)

◦ 현장체험 및 시설견학(23회/1,293명)

▸ 유치원(14회, 892명), 초등학생(6회, 379명), 일반인(3회, 22명)

□ 금후계획

◦ 지속적으로 현장학습운영 및 프로그램 개발          :  2010. 11～12

◦ 환경교육용 동영상 및 프리젠테이션 보완            :  2010. 11～12