2018. 10.

2018년 주요업무 추진실적

환경사업소

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2018년 주 요 업 무  결산

□ 2018년 주요업무 추진실적

◦ 강우시 하수관리 시범사업

◦ 노후하수관로 정비사업

◦ 남원[3단계] 하수관로 정비사업

◦ 호곡·월산·용전·서도지구 마을하수도 설치사업

◦ 소규모 마을하수처리시설 개량사업

◦ 소규모 마을하수처리시설 기능개선 및 완벽한 생활하수 관리

◦ 요천생태습지공원 시민 힐링·휴식 공간 조성

일  반  현  황

□ 기    구

									환경사업소장
									강 인 식
하수경영담당					하수시설담당								하수처리담당										마을하수담당
유 홍 규					김 종 남								양 병 우										문 하 성
∘행정종합계획수립 ∘회계․시설물 관리 ∘공기업 특별회계 운영 ∘생태습지공원 관리					∘하수도 중장기계획 수립 및 추진 ∘하수관거정비, 마을하수도 사업 시행 및 유지관리								∘남원하수처리장 운영 ∘분뇨처리시설 운영 ∘하수슬러지 처리시설 관리·감독										∘운봉․인월하수 처리장 운영 관리 ∘소규모하수처리시설 운영 관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	26	1	4	5	8	8
현 원	24	1	7	6	7	3	청 경 1 미화원 2 공무직 3
증 감	△2	-	3	1	△1	△5

□ 2018년 예산규모 : 38,139백만원

2018 예산

(단위 : 백만원)

구 분	2018년	2017년	증감(%)
합 계	38,139	38,011	0.34
일반회계	858	526	63.12
특별회계	37,281	37,575	△0.78

▷ 2018년 특별회계 : 37,281백만원

세   입

(단위 : 백만원)

구 분		2018년	2017년	증감(%)
합 계		37,281	37,575	△0.78
자체수입		5,591	4,899	14.13
의존수입	국비	18,166	19,476	△6.73
	지원금	13,524	13,200	2.4

세   출

(단위 : 백만원)

구 분		2018년	2017년	증감(%)
합 계		37,281	37,575	△0.78
사업비	소계	32,373	32,205	0.52
	투자사업	30,446	30,442	0.01
	경상사업	1,927	1,763	9.3
비사업	소계	4,908	5,370	△8.6
	행정운영	4,869	4,589	6.1
	예 비 비	39	781	△95

□ 하수처리시설 현황

총 64개소 (500㎥/일 이상 3개소, 500㎥/일 미만 61개소)

구 분	시설용량(㎥/일)	처리방법	비 고
남원하수처리장	50,000	심바이오공법
운봉하수처리장	800	회분식활성슬러지공법
인월하수처리장	1,000	회분식활성슬러지공법
소규모하수처리장	4,638	질소인고도처리 외 17개 공법	◦50톤 이상 : 34개소 ◦50톤 미만 : 27개소

1. 남원 하수처리장 현황

구 분	최 초	1차 증설	2차 증설
시설용량(㎥/일)	50,000	50,000	50,000
처리방법	표준활성슬러지법	심바이오	인제거장치
준공일자	1995.11.4.	2009.11.30.	2012.6.30.
부지면적(㎡)	34,980	36,505	36,505

2 운봉·인월 하수처리장 현황

구 분	운봉하수처리장	인월하수처리장
시설용량(㎥/일)	800	1,000
처리방법	회분식활성슬러지공법	회분식활성슬러지공법
준공일자	2006.5.30.	2006.5.30.
부지면적(㎡)	3,735	3,616

□ 요천생태습지공원 현황

위치	조성 규모	준공일자	주요시설
주생면 중동리 1275	145,298㎡	2014.12.01.	생태탐방로, 야구장, 다목적구장, 애견놀이터, 모정 등

2018년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 강우시 하수관리 시범사업(차집관로정비, 남원[2단계] 하수관로 정비) 공사발주 및 시행 ◦ 호곡·월산지구 마을하수도 설치사업 12월 완공 ◦ 하수처리시설 유지관리를 통한 주민 주거환경 개선

□ 하수도시설 지속적인 확충 및 유지관리

◦ 소규모 마을하수처리시설 설치사업 추진

- 호곡·월산·용전·서도지구

◦ 소규모 마을하수처리시설 기술진단을 통한 시설개선

◦ 노후 소규모 마을하수처리시설 개량사업 추진

- 와운·권포·장평·양평 하수처리시설

□ 환경부 강우시 하수관리 시범사업 추진

◦ 강우시 하수관리 시범사업 추진으로 하천변 차집관로 불명수 유입저감 및 처리장 효율 개선

□ 하수처리 노후시설물 개선 및 최적운영으로 청정하천 수질보전

◦ 하수처리시설 방류수 수질기준 준수

- 처리상태 : BOD 2.0㎎/L, SS 3.9㎎/L, T-N 9.510㎎/L, T-P 0.084㎎/L

(법적기준 : BOD 5㎎/L, SS 10㎎/L, T-N 20㎎/L, T-P 0.3㎎/L)

□ 하수처리장과 연계한 생태습지공원 운영·관리

◦ 요천생태습지공원 애견놀이터 시설보강공사 및 개장

◦ 요천생태습지공원 야구장 화장실 설치 및 수목식재 완료

◦ 요천생태습지공원 잡초제거 및 환경정비로 쾌적한 휴식공간 제공

2018년 주요업무 추진실적

강우시 하수관리 시범사업

□ 개    요

◦ 강우시 하수관리 시범사업 기본, 실시설계 및 관로정비사업 추진

- 차집관로정비사업 : 420억원(국 294, 시 126)

·요천 등 8개 하천 61.4km를 관로·맨홀 불량구간, 우수토실 정비계획 설계

→ 차집관로 굴착, 육상이설, 전체 및 부분보수로 구분하여 설계

※ 강우시 빗물유입 삭감을 위해 사업효과 우선지역 선정

- 남원(2단계) 하수관로정비사업 : 280억원(국 196, 시 84)

·동충·향교·하정·쌍교·금동·왕정·조산 일원

·가정 배수시설 정비 2,600가구, 기존관로 활용 31km, 관로정비 6.1km,         관로신설 29km,우수관로교체 6.5km, 우수토실 폐쇄 47개소 중 22개소         계획 설계

※ 용역비 : 1,278백만원 / 용역사 : ㈜도화엔지니어링외 3개사

□ 추진실적

◦ 시범사업 대상 선정	: 2015. 2.

◦ 한국환경공단 위·수탁 협약 체결	: 2015. 3.

◦ 기본 및 실시설계 용역 발주	: 2015. 6.

◦ 기본설계 완료에 따른 VE검토 추진	: 2016. 5.

◦ 하수도정비기본계획(변경) 수립	: 2016. 5. ~ 7.

◦ 사업시행 공고 및 발주                    : 2018. 7. ~ 8.

◦ 공사착공                                  : 2018. 9.

□ 금후계획

◦ 공사추진	: 2018. 9. ~ 2020. 12.

노후 하수관로 정비사업

◦ 노후하수관로 정밀진단(2016.04) 결과에 따른 노후하수관거 정비로 도로함몰 등 안전사고에 선제적 대응

◦ 1993년 조성된 도통1택지는 당시 기 분류식화 되었으나, 오접과 노후화로

금회 배수설비 정비계획 수립

◦ 동 시기에 수행하고 있는 「강우시 하수도정비 시범사업」과의 사업 경계를 명확히 구분하여 중복투자 방지

□ 개    요

◦ 사업위치 : 남원시 일원(도통동 시청 주변)

◦ 사업내용

구분		노후관로 정비물량
		합계	도통	향교	중부	왕정
굴착교체(m)		4,867	2,855	148	1,752	112
비굴착	전체보수(m)	753	314	3	436	-
	부분보수(개소)	272	104	3	143	22
배수설비 및 오접정비		도통처리구역 300가구 정비

◦ 총사업비 : 9,785백만원(국비 6,117, 시비 3,668)

※ 2018년 사업비 : 3,000백만원(국비 1,500, 시비 1,500)

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2020년(4개년)

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 완료	: 2017.  2. ~ 2018.  9.

◦ 환경부 재원협의 등 행정절차 이행	: 2018.  7. ~ 2018.  9.

□ 금후계획

◦ 공사발주 및 시행	: 2018. 10. ~ 2020. 11.

남원[3단계] 하수관로 정비사업

◦ 하수량 과다발생 예방을 위하여 시가지 합류식 지역 및 운봉권 처리구역 내에서 이송되는 불명수 유입 방지 등 하수처리 운영비용 절감과 노후하수관로 정비 병행 시행으로 안전한 하수시설을 확보하기 위함

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원처리구역 및 운봉처리구역

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

◦ 사 업 비 : 27,200백만원(국비 19,040, 시비 8,160)

◦ 사업내용

- 남원처리구역 : 오수관로 설치 L=31.7km, 배수설비 2,281가구

- 운봉처리구역 : 오수관로 설치 및 개량 L=15.2km

□ 추진실적

◦ 2018년 신규사업지구로 확정 내시	: 2017. 11.

◦ 실시설계 용역시행	: 2017. 12. ~ 2018. 12.

- 용역기간 : 2017. 12. ~ 2018. 12.

- 용 역 비 : 1,453백만원

- 용역개요 : 기본 및 실시설계 1식 노선측량 L=31.7km, 지질조사 11공

□ 금후계획

◦ 재원협의 및 행정절차 이행	: 2018. 11.

◦ 발주공고 및 공사착수	: 2018. 12.

◦ 공사추진	: 2019.  1. ~ 2020. 12.

호곡·월산·용전·서도지구

마을하수도 설치사업

□ 개    요

사 업 명	위 치	내 용	총사업비 (2017년사업비)	사업기간	비고
호곡지구	호곡, 고평리 일원	-관로L=7.9km -처리시설Q=90㎥/일	46.5억/국32.5,시14 (23.29억/국17.05,시6.24)	2016~2018 (3개년)
월산지구	월산,성리 일원	-관로 L=5.4km -처리시설Q=70㎥/일	32.6억/국22.8,시9.8 (14.1억/국9.9,시4.2)	2016~2018 (3개년)
용전지구	창산,상신,신월, 하도리 일원	-관로 L=10.9km -처리시설Q=200㎥/일	114.74억/국80.32,시34.42 (11.05억/국7.73,시3.32)	2017~2020 (4개년)
서도지구	혼분문학배경지, 서도리 일원	-관로 L=7.6km -처리시설Q=100㎥/일	34.14억/국23.9,시10.24 (7.15억/국5,시2.15)	2018~2020 (3개년)

□ 추진실적

◦ 호곡지구 오수관로 공사(3차분) 착수(전체 공정율 80%)	: 2018. 6.

◦ 월산지구 오수관로 공사 완료	: 2018. 9.

◦ 용전지구 기본 및 실시설계용역 준공	: 2018. 5.

◦ 용전지구 오수관로 공사(1차분) 착수(전체 공정율 10%)	: 2018. 6.

◦ 서도지구 마을하수도 설치사업 재원협의 신청	: 2018. 9.

□ 금후계획

◦ 월산지구 관로공사 및 하수처리시설 공사 준공	: 2018. 11.

◦ 호곡지구 관로공사 및 하수처리시설 공사 준공	: 2018. 12.

◦ 용전지구 관로공사 1차분 준공	: 2018. 12.

◦ 서도지구 관로공사 1차분 착공                          : 2018. 11.

소규모 마을하수처리시설 개량사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍 권포리, 산내면 부운리, 인월면 성산리, 송동면 양평리

◦ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2019. 6.

◦ 사 업 비 : 2,155백만원 (국비 640, 시비 1,515)

◦ 사 업 량 : 160㎥/일 (권포 50㎥/일, 와운 30㎥/일, 장평 20㎥/일, 양평 60㎥/일)

◦ 사업내용 : 4개 하수처리시설(권포, 와운, 장평, 양평) 전면개량

□ 추진실적

[권포, 와운]

◦ 소규모 하수처리시설 기본․실시설계            : 2017. 2. ~ 10.

◦ 하수처리시설 공법선정                       : 2017. 5. 24.

◦ 하수도정비 기본계획 부분변경                : 2018. 5. 11.

◦ 개량사업 인가 및 재원협의                   : 2018. 9. 14.

[장평, 양평]

◦ 하수도정비기본계획 반영	: 2017. 2.

◦ 소규모 하수처리시설 기본․실시설계            : 2018. 3. ~ 12.

□ 금후계획

[권포, 와운]

◦ 원가심사 의뢰                               : 2018.  9.

◦ 공사발주 및 준공	: 2018. 10. ~ 2019. 6.

[장평, 양평]

◦ 하수처리시설 공법선정                       : 2018. 10.

◦ 인가신청 및 재원협의 등 행정절차 이행       : 2018. 11. ~ 12.

◦ 공사발주 및 준공	: 2019.  1. ~  6.

- 소규모 마을하수처리시설 -

기능개선 및 완벽한 생활하수 관리

□ 개    요

◦ 주요시설 : 소규모 마을하수처리장 61개소

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12. (연중)

◦ 사 업 비 : 470백만원

◦ 사업내용 : 마을하수처리장 시설물 개량 및 유지관리

□ 추진실적

◦ 소규모하수처리시설 중장기 관리계획 하수도기본계획 반영

- 소규모마을하수처리장 2020년까지 관로연결(14개소)

◦ 섬진강수계 소규모마을하수시설 기술진단실시	: 9개소

- 대    상 : 진목, 하신, 제천, 사석, 평촌, 옹정, 반송, 송내, 입암

- 진단기간 : 2018. 4. 16. ~ 9. 12. (5개월)

- 진단비용 : 95백만원

◦ 마을하수시설물 유지관리 준설, 미생물 식종 등 시설개선	: 50건

◦ 소규모마을하수시설 진입로 보수 및 옹벽개선	: 3개소

◦ 새만금청 방류수질 점검결과

점검년도	점검대상 개소수	수질 초과 개소수	비 고
2016년	61	1	집중관리를 통한 유지관리
2017년	61	2
2018년 (9월 현재)	61	-

□ 금후계획

◦ 마을하수처리시설 최적운영으로 완벽한 수질관리(61개소) : 2018. 1. ~ 12.

◦ 개량사업비 국비확보 지속 추진

요천생태습지공원 시민 힐링·휴식 공간 조성

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.

◦ 총사업비 : 846백만원 (시비 846)

◦ 사업내용 : 애견놀이터 시설보강, 화장실 설치, 수목 식재, 야구장  조명시설 설치, 사후 모니터링 용역 등

□ 추진실적

◦ 요천생태습지공원 애견놀이터 시설보강공사    : 2018. 5. 1. 준공

- 소요액/106백만원【CCTV 9대, 퍼걸러 2조, 관리사무실, 잔디 등】

◦ 생태습지공원 수목 식재공사                  : 2018. 5. 2. 준공

- 소요액/43백만원(편백나무 72주, 수목이식 34주, 잔디 276㎡)

◦ 생태습지공원 야구장 화장실 설치공사         : 2018. 5. 19. 준공

- 소요액/69백만원(화장실 1식, 상·하수 배수관 설치 등)

◦ 생태습지공원 사후 모니터링 용역             : 2018. 2. 22. ~ 12. 21.

- 소요액/9백만원(사후관리계획 수립, 수질 및 수생태계 모니터링, 주민만족도 조사 등)

◦ 잡초제거 및 모정, 벤치 도장 등 환경정비	: 2018. 3. ~ 현재

◦ 야구장 조명시설 설치공사

- 야구장 조명시설 벤치마킹 및 조명종류 선정  : 2018. 4. ~ 5.

- 원가 심사 및 설계용역 준공                 : 2018. 7.

- 조달청 계약 의뢰	: 2018. 8.

□ 금후계획

◦ 야구장 조명시설 착공 및 준공	: 2018. 10. ~ 12.

2018. 10.

2018년 주요업무 추진실적

상수도사업소

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2018년 주 요 업 무  결산

□ 2018년 주요업무 추진실적

◦ 상수도 공기업의 건전재정 기반구축

◦ 농촌 소규모수도시설 정비

◦ 광역상수도 마을권 상수도사업

◦ 농어촌 생활용수 개발사업

◦ 산동 배수지계통 상수도공사

◦ 대강 배수지계통 상수도공사

◦ 덕과 배수지계통 상수도공사

◦ 자연방사성물질 검출지구 상수도 공급(1차)

◦ 자연방사성물질 검출지구 상수도 공급(2차)

◦ 두메마을 광역상수도 직접공급사업

◦ 대상지구 농어촌 생활용수 개발사업

◦ 노후 상수도관 교체공사

◦ 누수다발지역 상수관로 개선공사

◦ 월락정수장 개량사업

일  반  현  황

□ 기    구

									상수도사업소장
									조 남 도
수도경영담당					급수담당							수도시설담당									누수방지담당
임 성 민					이 현 석							박 병 민									김 오 진
∘상수도 공기업 경영 ∘상수도 효율화 사업 ∘특별회계 재정운영 ∘상수도 사용료 검침 및 요금부과 징수					∘광역상수도 마을권 급수 공사 ∘마을상수도, 소규모 급수시설 관리 ∘개인 급수공사 지도 및 감독							∘상수도 중장기 계획수립 ∘광역상수도 수수사업 ∘정수장 및 배수지 운영 관리 ∘상수원 보호구역 관리									∘상수도 관망 유지 관리 ∘노후 급 배수관 계량기 시설 개량 ∘누수탐사 및 복구 민원업무 처리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	23	1	5	6	4	7
현 원	22	1	8	5	6	2	11 (청경2,공무9)
증 감	△1	-	3	△1	2	△5

□ 2018년 예산규모 : 24,052백만원

				＜2017 예 산 >			(단위 : 백만원)
	구 분		2018년		2017년			증 감(%)
	합 계		24,052		20,805			3,246(15.6%)
	일반회계		7,726		6,366			1,360(21.3%)
	특별회계		16,326		14,439			1,887(13%)

▷ 2018년 특별회계 : 16,326백만원

					＜세 입＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2018년		2017년			증 감(%)
	합 계			16,326		14,439			1,887(13%)
	자체수입			7,639		7,609			30(0.4%)
	의존수입		국 비	2,617		2,430			187(7.7%)
			지원금	6,070		4,400			1,670(37.9%)

					＜ 세 출 ＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2018년		2017년			증 감(%)
	합 계			16,326		14,439			1,887(13%)
	사업비		소계	10,950		9,412			1,538(16.3%)
			투자사업	8,869		7,271			1,598(21.9%)
			경상사업	2,081		2,141			△60(△2.8%)
	비사업		소계	5,376		5,027			349(6.9%)
			행정운영	5,087		4,836			251(5.2%)
			예 비 비	289		191			98(51.3%)

※ 행정운영 : 인건비 + 기본경비 + 광역정수비

□ 급수현황

(’18. 6. 30. 기준)

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급률 (%)	1인 1일 급수량(ℓ)	평균생산량 (㎥/일)	유수율 (%)
82,856	76,610	92.5	336	25,724	75

□ 수도시설 현황

◦ 생 산 시 설 : 39,800㎥/일(월락정수장 15,000 / 광역상수도 24,800)

◦ 상수도 관로 : 988㎞(도수․송수․배수관 517, 급수관 471)

◦ 배  수  지 : 9개소(27,250㎥)

◦ 가  압  장 : 25개소(무인자동제어)

◦ 감  압  변 : 32개소

◦ 검침급수전 : 26,976전

□ 상수원 보호구역 현황

◦ 위    치 : 월락․도통․신촌․고죽동, 이백면

◦ 지정면적 : 414,525㎡

◦ 지 정 일 : 1985. 12. 24.(0.418㎢) → 2008. 12. 12.(0.414㎢)

□ 농촌 소규모수도시설 현황

시설수 (개소)	규 모 별		급수인구	비 고
	마을상수도	소규모급수시설
100	57	43	3,678세대 7,382명	□소규모 급수시설:20㎥/일 미만 □마을상수도 - 20㎥/일 이상 500㎥/일 이하

□ 상수도 관로

(단위 : m)

구분	총연장	재 질 별				매설연한별			비고
		금속	PE.PVC	내충격수도관	기타	20년미만	20~30년	30년이상
계	988,063	243,617	200,172	514,104	30,170	865,366	56,721	65,976
도수관	100	-	-	-	100	100	-	-
송수관	15,226	9,840	1,930	2,707	749	12,223	2,554	449
배수관	501,487	233,093	3,203	244,379	20,812	471,474	12,202	17,811
급수관	471,250	684	195,039	267,018	8,509	381,569	41,965	47,716

2018년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 안정적인 수돗물 공급을 위한 기반시설 확충 ◦ 시공 품질 향상 및 맑은 물 공급 ◦ 고객 만족을 위한 시민소통 위주 공기업 구현 ◦ 상수도 재정 확충을 위한 국가예산 확보 총력

□ 안정적인 수돗물 공급을 위한 기반시설 확충

◦ 배수지계통 광역 상수도공사 추진(7개 지구 L=18.8km / 3,632백만원)

◦ 배수관로 포설사업 추진(4개 지구 L=2.0Km, 가압장 3개소 / 550백만원)

◦ 광역상수도 마을권 상수도사업(6개 지구 L=5.6Km / 606백만원)

◦ 농촌 소규모수도시설 정비(관로교체 5개 지구 L=9.5Km / 1,506백만원)

□ 시공 품질 향상 및 맑은 물 공급

◦ 노후관로 교체 : 5개 지구 9.4km / 2,200백만원, ‘18년 추진공정 : 85%

◦ 누수복구처리 : 461건, 생활민원처리 : 584건, 노후보호통 교체 : 58건

◦ 누수다발지역 수도시설 정비(관로교체 3개 지구 완료 L=6.9Km / 1,200백만원)

□ 고객 만족을 위한 시민소통 위주 공기업 구현

◦ 주민과 소통 행정을 위해 수돗물 품질보고서, 수돗물 수질검사 결과 홍보를 통한 주민과의 소통행정 추진

◦ 상시 비상급수 체제 운영, 긴급 누수복구팀 운영(누수복구 461건)

◦ 상수도 과다 수용가에 사전 예고제 실시(513건)

- 옥내 누수발생 및 평균사용량보다 과다 사용 시 사전고지로 요금민원 해소

□ 상수도 재정 확충을 위한 국가예산 확보 총력

◦ ‘19년도 농어촌생활용수 개발사업 균특예산 확보 : 1,910백만원

◦ ‘19년도 소규모노후화시설 개량사업 균특예산 확보 : 360백만원

◦ 환경부 지방상수도 현대화사업 국비 반영 강력 추진

- 월락정수장 개량 국비 우선지원 강력 추진

⇒ 중앙부처(환경부, 환경관리공단, 기획재정부) 및 국회 방문 : 11회

⇒ 국가예산 선점 위한 월락정수장 개량사업 실시설계 추진 중

⇒ 시 지역 지원 시 우리시 우선 지원토록 노력

2018년 주요업무 추진실적

상수도 공기업의 건전재정 기반구축

□ 개    요

◦ (추진목표)  상수도 급수구역 확대와 체납자에 대한 징수, 세입 목표

달성하여 건전 재정운영 도모

◦ 연도별 세입 증감 추이

(단위 : 백만원)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	전년대비
세 입	16,133	14,999	15,098	14,439	16,326	증 13%

☞ 2017년 대비 주요증감 요인(증 18억원)

·일반회계 전출금 : 60억원(‘17년 44억원) 증 16억원

·농어촌 생활용수 공급사업 국비 추가확보 : 26억(‘17년 24억) 증 2억

□ 추진실적

◦ 상수도 급수구역 확대로 인한 사용료 수입 확충        : 64백만원

- 대강배수지계통 공사 및 마을권 급수공사 완료지역 : 운봉 산덕 외 8개 마을

◦ 상수도 사용료 체납금 징수활동 강화로 자주재원 확보   : 160백만원

- 체납특별징수 기간 운영(매분기) : 단수조치 102건, 재산압류 39건

◦ 불용물품 및 용도폐지 공유재산 매각으로 자주재원 확충 : 23백만원

□ 추진계획

◦ 2020년 국가예산 신규 확보에 총력 : 월락정수장 개량사업

◦ 수도요금 목표 징수율을 상향 조정(97%⇒98%)하여 건전 재정 기반 구축

- 상수도요금 체납자 강제징수를 위한 행정 처분 추진 (단수, 재산압류 등)

농촌 소규모수도시설 정비

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2018. 1 ~ 12월(연중)

◦ 위    치 : 운봉읍 외 15면동 / 100개소(마을상수도 57, 소규모급수시설 43)

◦ 사 업 비 : 1,506백만원《정비 1,106, 긴급복구 200, 수원개발 200》

◦ 사 업 량 : 개량 5개 지구 L=9.5㎞(수지 진곡, 보절 금계, 산내 상황·                  와운·달궁), 수원개발 1개 지구(수지 갈촌) / 암반관정 및                  관로 L=0.4km 누수 긴급복구 및 유지보수(수시)

□ 추진실적

◦ 소규모수도시설 관로 정비공사 완료(4개소)         : ‘18. 3 ~ 6월

- 수지 진곡, 보절 금계, 산내 상황, 산내 와운마을

◦ 수원개발 및 관정이용 시설공사 추진(2개소)        : ‘18. 3 ~ 9월

- 수지 갈촌, 산내 부운마을

◦ 소규모수도시설 긴급복구 및 유지보수 추진(수시)   : ‘18. 1 ~ 9월

- 총 39건(긴급 누수복구, 수중모터펌프 교체, 수위조절기 교체 외)

◦ 소규모수도시설 수질검사 추진(원수 2회, 정수 3회)  : ‘18. 5 ~ 9월

□ 금후계획

◦ 소규모수도시설 관로 정비공사 시행(1개소)           : ‘18. 9 ~ 11월

- 산내 달궁마을(제1회 추경예산 확보)

◦ 인월 구인월마을 물탱크 교체공사 시행(FRP⇒스텐레스) : ‘18. 9 ~ 10월

◦ 누수 긴급복구 및 유지보수공사 추진(수시)         : ‘18. 9 ~ 12월

◦ 소규모수도시설 수질검사 추진(원수 1회, 정수 1회)  : ‘18. 11월

◦ 2019년도 소규모수도시설 정비대상 선정            : ‘18. 9 ~ 11월

광역상수도 마을권 상수도사업

□ 개    요

◦ 총괄사업

(단위 : 백만원)

구 분	전 체		기투자		2018년		이후계획
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
마을권급수	347마을	20,160	283마을	16,054	18마을	1,250	46마을	2,856

◦ 2018년도 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1 ~ 12월

- 위    치 : 인월 자래마을 등 18개 마을

- 사 업 량 : 급수관로 6개 지구 L=5.6km, 계량기설치 492가구

- 사 업 비 : 1,250백만원

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 추진                               : ‘18. 1 ~ 3월

◦ 광역상수도 마을권 급수공사 추진(3지구, 0.6km)    : ‘18. 3 ~ 9월

- 주천 용담, 이백 강촌, 운봉 산덕

◦ 마을권 계량기 설치공사 추진(8개 마을 290가구)    : ‘18. 3 ~ 9월

□ 금후계획

◦ 광역상수도 마을권 급수공사 추진(3지구, 5.0km)    : ‘18. 9 ~ 12월

- 인월 자래(10월 중 완료) / 인월 동무, 월평(제1회 추경예산 확보)

◦ 마을권 계량기 설치공사 추진(10개 마을 202가구)   : ‘18. 9 ~ 12월

◦ 2019년도 마을권 급수공사 대상지 선정	: ‘18. 11월

농어촌 생활용수 개발사업

□ 개    요

사 업 명	사 업 량	총 사 업 비 (백만원)			사업기간	비 고 (공정)
		계	국 비	시 비
계	7개지구 76개마을	29,230	20,449	8,781 (97)	2013~2021
산동 배수지계통	L=38km, 15개마을	6,000	4,200	1,800	2013~2018	100%
대강 배수지계통	L=58km, 24개마을	7,600	5,318	2,282	2013~2018	95%
덕과 배수지계통	L=9.0km, 16개마을	6,530	4,562	1,968	2015~2021	60%
자연 방사성물질 검출지구(1차)	L=14.9km, 6개마을	2,900	2,030	870	2015~2018	100%
자연 방사성물질 검출지구(2차)	L=11.2km, 10개마을	3,050	2,135	915	2016~2021	30%
두메마을 광역상수도 직접 공급 사업	L=2.9km, 2개마을	650	454	196 (97)	2017~2019	80%
대상지구 농어촌 생활용수 개발사업	L=4.3km, 3개마을	2,500	1,750	750	2018~2021	5%

( )내서 한국수자원공사 예산

□ 재원투자 현황                            (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2017	2018	2019이후	비고
계	29,230	15,287	3,224	3,632	7,087
국 비	20,449	10,394	2,430	2,617	5,008
지방비	8,781	4,893	794	1,015	2,079

□ 추진실적                       수촌 : 시행완료,   산촌  : 시행 중

사 업 명	급수계획	기 급수완료	2018년 시행	2019년 이후	비 고
계	76개마을	43개마을	16개마을	17개마을
산동 배수지계통	15개마을	이백(산남,남평,계산,강촌,내동) 산동(중절,부동,부서,이곡,태평,신기,등구,평선)	산동(신풍,대촌)
대강 배수지계통	24개마을	강석,사촌,석촌,방동,저동,월산,금탄,광암,생사,신기,가덕,방산,송내,입암,대치,평촌	수촌,새터,옥전,택촌,도곡,곡촌,양촌,산촌	-
덕과 배수지계통	16개마을	수지(신평,내호곡),덕과(추산) 보절(성북,연산,내황,계월,신기,부흥)	보절(중현) 송동(원촌,오촌)	보절(다산,호복동,금계) 사매(노봉)
자연 방사성물질 검출지구(1차)	6개마을	주생(대지),사매(수동,계동) 산동(목동,식련)	인월(용주)
자연 방사성물질 검출지구(2차)	10개마을	-	송동(문치,생촌)	주천(내용궁,외용궁,회덕,노치,용동,고촌,내기),운봉(주촌)
두메마을 광역상수도 직접 공급 사업	2개마을	-	-	산동(월산,석동)
대상지구 농어촌 생활용수 개발사업	3개마을	-	-	산동(대상,상신,요골)

□ 금후계획

◦ 2021년까지 25개 마을 급수완료 계획으로 사업 추진

산동 배수지계통 상수도공사

(농어촌 생활용수 개발사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산동면 일원

◦ 사 업 량 : 배수지 1개소, 상수관로 부설 L=38.0km

◦ 총사업비 : 6,000백만원(국비 4,200, 시비 1,800) / ‘18년도 222백만원

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2018년(6개년)

□ 추진실적

◦ 산동배수지계통 상수도공사(5차분) 착수          : ‘17. 2. 27.

◦ 2018. 9월까지 급수완료                         : 15개 마을

[이백(산남, 남평, 계산, 강촌, 내동), 산동(중절, 부동, 부서, 이곡, 태평,       신기, 등구, 평선, 신풍, 대촌)]

□ 금후계획

◦ 하자점검 및 유지관리

대강 배수지계통 상수도공사

(농어촌 생활용수 개발사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 대강면 일원 / 대강면 전체 24개 마을

◦ 사 업 량 : 배수지 1개소, 상수관로 부설 L=58.0km

◦ 총사업비 : 7,600백만원(국비 5,318, 시비 2,282) / ‘18년도 577백만원

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2018년(6개년)

□ 추진실적

◦ 대강배수지계통 상수도공사(6차분) 착수          : ‘18. 2. 21.

◦ 2018. 9월까지 급수완료                         : 21개 마을

(강석, 사촌, 석촌, 방동, 저동, 월산, 금탄, 광암, 생사, 신기, 가덕, 방산,        송내, 입암, 대치, 평촌, 수촌, 새터, 옥전, 택촌, 도곡)

□ 금후계획

◦ 대강배수지계통 상수도공사(6차분) 준공          : ‘18. 12월

- 2018년 급수 계획 : 3개 마을(곡촌, 양촌, 산촌)

※ 2018년도 전체사업 완료를 목표로 사업 추진

덕과 배수지계통 상수도공사

(농어촌 생활용수 개발사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 덕과 배수지계통 지역 등 5개 지구 / 16개 마을

- 사매, 덕과, 보절, 송동, 수지지구

◦ 사 업 량 : 상수관로 부설 L=9.0km

◦ 총사업비 : 6,530백만원(국비 4,562, 시비 1,968) / ‘18년도 1,583백만원

◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2021년(7개년)

□ 추진실적

◦ 덕과배수지계통 상수도공사(보절지구/중현마을, 송동지구) 착수 : ‘18. 5. 16.

◦ 2018. 9월까지 급수완료                                : 9개 마을

[덕과(추산), 보절(성북, 연산, 내황, 계월, 신기, 부흥), 수지(신평, 내호곡)]

□ 금후계획

◦ 덕과배수지계통 상수도공사(보절지구/중현마을, 송동지구) 준공 : ‘18. 11월

- 2018년 급수 계획 : 3개 마을[보절(중현), 송동(원촌, 오촌)]

※ 사매(노봉)지구는 하수도사업과 연계하여 추진 계획

자연방사성물질 검출지구 상수도 공급(1차)

(농어촌 생활용수 개발사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 일원(4개 지구, 6개 마을)

- 주생(대지), 사매(수동, 계동), 산동(목동, 식련), 인월(용주)

◦ 사 업 량 : 상수관로 부설 L=14.9km

◦ 총사업비 : 2,900백만원(국비 2,030, 시비 870) / ‘18년도 110백만원      ◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년(4개년)

□ 추진실적

◦ 주생지구, 사매지구, 산동지구 공사완료            : ‘15. 6. ~ ‘17. 12.

◦ 자연방사성물질 검출지구 상수도공사(인월지구) 착수   : ‘18. 3. 15.

◦ 자연방사성물질 검출지구 상수도공사(인월지구) 준공   : ‘18. 4. 27.

◦ 2018. 9월까지 급수완료                         : 6개 마을

[주생(대지), 사매(수동, 계동), 산동(목동, 식련), 인월(용주)]

□ 금후계획

◦ 하자점검 및 유지관리

자연방사성물질 검출지구 상수도 공급(2차)

(농어촌 생활용수 개발사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 일원 (2개 지구, 10개 마을)

- 송동(문치, 생촌), 주천(내·외용궁, 회덕, 노치, 용동, 고촌, 내기), 운봉(주촌)

◦ 사 업 량 : 상수관로 부설 L=11.2km

◦ 총사업비 : 3,050백만원(국비 2,135, 시비 915) / ‘18년도 730백만원

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2021년(6개년)

□ 추진실적

◦ 자연방사성 검출지구 상수도공사(1차분) 준공      : ‘17. 12. 19.

- 전체관로 11.2km 중 6.1km 포설완료

◦ 자연방사성 검출지구 상수도공사(2차분) 착수      : ‘18.  3.  9.

□ 금후계획

◦ 자연방사성 검출지구 상수도공사(2차분) 준공      : ‘18. 11월

- 2018년도 급수 계획 : 2개 마을[송동(문치, 생촌)]

두메마을 광역상수도 직접공급사업

(농어촌 생활용수 개발사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산동면 월석리(월산, 석동마을)

◦ 사 업 량 : 상수관로 부설 L=2.9km

◦ 총사업비 : 650백만원(국비454, 시비99, 한국수자원공사97) / ‘18년도 267백만원

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2019년(3개년)

※ 기존 배수관로를 통한 지방상수도 공급이 어려운 두메(奧地)지역 중        광역송수관로 인접 2km내 마을에 대하여 광역송수관로에서 직접 분기         하여 공급 추진하는 사업임(환경부+한국수자원공사 협업사업)

□ 추진실적

◦ 2016년도 수도시설 확충, 개발사업 예산설명회(환경부)  : ‘15. 2.  9.

◦ K-Water 전북지역본부 관계자 면담 및 협의       : ‘15. 2. 10.

◦ 사업관련 기관, 마을관계자 사업내용 설명         : ‘15. 2. 23.

◦ 사업관련기관 협약 체결(K-Water, 남원시)         : ‘15. 7. 21.

◦ 두메마을 광역상수도 직접공급사업(1차분) 착수    : ‘18. 3.  6.

□ 금후계획

◦ 두메마을 광역상수도 직접공급사업(1차분) 준공     : ‘18. 11월

◦ 두메마을 광역상수도 직접공급사업(2차분) 시행     : ‘19. 3 ~ 6월

대상지구 농어촌 생활용수 개발사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산동면 일원(3개 마을-대상, 상신, 요골)

◦ 사업내용 : 상수관로 부설 L=4.3km, 가압장 1개소

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4개년)

◦ 총사업비 : 2,500백만원(국비 1,750, 시비 750)

- 2018년 사업비 : 143백만원 (실시설계용역 추진)

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 시행                            : ‘18. 2 ~ 10월

◦ 사업시행계획 주민설명회 개최                 : ‘18. 9월

◦ 실시설계 용역 완료                           : ‘18. 7. 17.

◦ 원가심사 의뢰                                : ‘18. 9월

□ 금후계획

◦ 대상지구 농어촌생활용수 개발사업(1차분) 착수  : ‘18. 10월

- 2021년까지 3개 마을 급수계획으로 사업 추진

노후 상수도관 교체공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동지역 급수지역

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2020년(8개년)

◦ 사업규모 : 노후 상수관로 교체 135km, 블록시스템 구축 1식

◦ 총사업비 : 18,000백만원(시비)

◦ 재원투자계획                                      (단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년 이후	비 고
18,000	10,096	2,200	2,200	3,504

※ 2018년 계획

- 사 업 량 : 상수도관 교체 L=9.4km(상수관망 L=6.2km, 타 공사 3.2km)

- 위    치 : 왕정동, 금동, 조산동, 천거동, 도통동, 동충동, 죽항동 일원

- 사 업 비 : 2,200백만원

- 사업기간 : 2018. 1 ~ 11월

□ 추진실적

◦ ‘17년까지 노후 상수도관 교체 : L=80.9km(상수도사업소 70.7, 타 부서 10.2) ⇒ 60.0%

- 동지역 블록구축(남원3․4․5․6․7블록 L=29.9km)	: ‘13. ~ ‘16.

- 타 부서 노후관 교체(도시, 건설, 안전재난 L=10.2km)    : ‘12. ~ ‘16.

- 타 공사 병행 노후관 교체(도시가스, 하수관로 L=19.5km)   : ‘13. ~ ‘17.

- 동지역 노후관 교체(죽항, 왕정, 동충, 향교 L=21.3km)	: ‘12. ~ ‘17.

◦ ‘18년도 노후관 교체(용성고, 용성로 L=4.2km)           : ‘18. 9. 30.

□ 금후계획

◦ 서문주변, 요천로(1구간) 노후관로 교체 공사 준공(L=2km) : ‘18. 11월

◦ 타 공사 병행 노후관 교체(남원초 주변 L=3.2km)         : ‘18. 12월

◦ ‘19년도 사업지구 조사 및 선정                         : ‘18. 12월

누수다발지역 상수관로 개선공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수지역 (읍면동)

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2020년(7개년)

◦ 사업규모 : 누수발생 노후관(PVC, PE관 등) 교체 / L=56.0km

◦ 총사업비 : 7,230백만원(시비)

◦ 재원투자계획                                        (단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년 이후	비 고
7,230	3,030	1,200	1,200	1,800

※ 2018년 계획

- 사 업 량 : 상수도관 교체 L=6.9km

(신정 샛터 2.4km, 이백 폐문 2.1km, 노암5통 2.4km)

- 사 업 비 : 1,200백만원

- 사업기간 : 2018. 1 ~ 11월

□ 추진실적

◦ ‘17년까지 관로 교체 : L=30.4km ⇒ 54.2%

- 이백 문화, 금지 귀석·옹정·입암, 송동 세전, 왕정교, 운봉시가지,        주천 하송, 주생 상동 : ‘14. ~ ‘16.

- 만복사지, 고죽동 황죽, 노암2통, 조산8통(L=8.8km)        : ‘17.

◦ ‘18년도 관로 교체 완료 L=6.9km                         : ‘18. 6월

- 신정 샛터 2.4km, 이백 폐문 2.1km, 노암5통 2.4km

□ 금후계획

◦ ‘19년도 사업지구 대상지 조사                         : ‘18. 11월

◦ ‘19년도 사업지구 선정 확정                           : ‘18. 12월

월락정수장 개량사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 월락동 지내

◦ 사업내용 : 정수장 시설 전면개량 Q=15,000톤/일

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4개년)

◦ 총사업비 : 268억원(국비 134, 시비 134)

- 실시설계용역비 : 1,030백만원(‘16년-397, ‘17년-600, 이후 33)

□ 추진실적

◦ 지방상수도 현대화사업 국가예산반영 건의           : ‘14. ~ 현재

◦ 노후상수도시설 노후도 실태평가 및 타당성조사(환경부)  : ‘15. 8 ~ 12월

- 118개 지방자치단체 30,343억원(상수관로 103, 정수장 24)

◦ 지방상수도 현대화사업 일부 국고지원 결정          : ‘16. 3. 28.

※ 월락정수장 개량사업 반영됨

< 추진방식 >

- 1 단 계 : 2017년부터 군(郡) 지역 우선 지원

- 2 단 계 : 2021년부터 시(市) 지역 지원

- 지원방식 : 사업의 우선순위, 타당성, 사업추진의지 등을 고려

◦ 실시설계용역 착수                                 : ‘16. 12. 29. ~

□ 금후계획

◦ 기재부 및 환경부 동향파악 적극 대응

⇒ 2021년도 시(市) 지역 지원 시 우리시가 우선 선정될 수 있도록           기재부 및 환경부 지속 건의