2019. 1.

2019년 주요업무 계획

산   림   과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2018년 주요업무 결산

□ 2019년 중점 추진방향

□ 2019년 주요업무 계획

◦ 함파우~소리체험관 테마꽃길 조성사업

◦ 무궁화동산 조성사업

◦ 임도사업

◦ 숲길 조성사업

◦ 산불방지 대책

◦ 보호수 생육개선 및 쉼터 조성사업

◦ 산림병해충 방제

◦ 숲가꾸기사업

◦ 도시숲 조성 및 가로수 관리

◦ 산림소득 증대사업

◦ 조림사업

◦ 창조적 마을 만들기

◦ 백두대간생태교육장 운영

일  반  현  황

□ 기    구

										산 림 과 장
										정 창 호
산림경영담당					산림보호담당						조경시설담당								산림소득담당						백두생태담당
이 재 우					안 성 순						소 민 정								이 승 재						안 도 엽
임도개설 및 관리 숲길(등산로) 정비 임업후계자 선정‧관리 공유재산관리 임업통계 자연휴양림관리 국가산림문화자산 지정및관리					산불방지대책추진산림병해충방제 산지전용허가·협의 산림경영계획인가 목재산업시설현대화 토석채취 허가․지도 숲가꾸기사업 추진						도시숲 조성·관리 가로수 조성·관리 가로화단조성·관리 요천변 꽃단지 조성 향기원,구역사 꽃단지 조성·관리								조 림 사 업 추 진 산림소득사업추진 백두대간주민지원 농림사업·농특회계 마을만들기 산촌생태마을관리						백두대간생태교육장 운영 및 관리 ∘전 시 관 ∘체험·휴양시설 ∘생태관광에코롯지 ∘국민여가캠핑장 ∘고원선수촌훈련장

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	23	1	5	4	7	6	17
현 원	20	1	8	6	3	2	17
증 감	△3	-	3	2	△4	△4	-

※ 비    고 : 17명(임기제 3, 청원경찰 6, 공무직 8)

2018년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 복지시설 나눔숲 사후관리『우수기관』선정 - 복지시설 나눔숲 조성지(이백 남원소망의 문) 사후관리 ◦ 임도신설(작업임도) 1위 선정 ◦ 특별교부세 2억원 확보 - 함파우~소리체험관 테마꽃길 조성 ◦ 2019년 공모사업 선정 - 무궁화 동산 조성 : 3.1운동기념탑 주변/ 1억원 - 산림휴양치유마을 : 산내 달궁/ 5억원(2019~2020) - 풍경있는 농산촌 가꾸기 : 주천 하주/ 1.9억원 ◦ 덕음산 오감만족 숲·철쭉공원·신생마을 꽃단지 조성 - 다양한 연령층을 위한 숲속 놀이공간 조성 및 관광객에 포토장소로 각광 ◦ 백두대간 생태교육장 운영 활성화 - 물놀이장, 힐링캠핑장 개장(7월) - 특별전 개최 4회 : 겨울(‘17.12.23~‘18.2.11),봄(5.5~5.22),여름(7.21~8.14),추석(9.22~10.3)

□ 생태적으로 건강한 산림자원 육성 및 산림보호 활동

◦ 지리산둘레길특화림 등 조림사업                : 338ha/ 1,712백만원

◦ 큰나무․어린나무․조림지가꾸기 3개사업          : 1,516ha/ 2,122백만원

◦ 사방댐 등 사방사업 실시                       : 17개소 3,079백만원

◦ 산불방지 강화 및 발생지 조기진화              : 17개소 1.08ha 피해

◦ 산림병해충 예찰 및 방제단 운영              : 174ha 방제

◦ 생활권재해우려목 제거                         : 385주

◦ 임도신설 2개소                                : 1.58km 403백만원

◦ 임도구조개량 6개소                              : 2.4km 279백만원

□ 건강한 녹색 네트워크 구축

◦ 오감을 깨우는 도심속 힐링 공간 조성 : 덕음산 오감만족 숲 조성 : 1.2㏊, 20억원

- 열매나무 숲, 편백나무숲, 산수유·철쭉동산, 숲속놀이터(미끄럼틀 등 12종) 등

◦ 향기원, 요천변, 신생마을 사계절 꽃단지 조성 : 튤립, 산파첸스, 코스모스, 핑크뮬리 등 : 4.7㏊

◦ 덕음산 철쭉공원 조성 : 데크로드 259m, 철쭉 66,160주

◦ 무궁화 동산 공모사업 선정                       : 1억원(10.15)

◦ 복지시설 나눔숲 사후관리 기관포상(남원시, 소망의문) : 우수기관 선정(11.12)

□ 미래소득 창출을 위한 산림소득 증대지원

◦ 산림소득증대       : 임산물 상품화, 유통기반, 생산기반 등 8개사업, 628백만원

◦ 백두대간 주민소득  : 저온저장고, 정제기, 건조기, 창고 등 51개소, 307백만원

◦ 목재산업시설현대화 : 2개소(대경산업, 남원산림조합), 280백만원

□ 백두대간 생태교육장 운영  ※ 기준일 12. 19.

◦ 전시관                   : 61,104명(무료 40,171, 유료 20,933)/ 61,288천원

◦ 체험·휴양시설(트리하우스)  : 399동/ 41,181천원/ 11,583명

◦ 에코롯지·캠핑장           : 2,560동/ 117,690천원/ 12,232명

	아쉬운 점
◦ 산림청 소득보조사업 자부담률이 높아 중도 포기자 발생 □ 포기자에 대해 사업신청 제한하고, 적극적인 홍보로 대상자 발굴

2019년 중점 추진방향

산림가치 창출 녹색도시 남원

	중 점 추 진 과 제
◦ 산림자원 육성 및 효율적 산지관리 - 조림, 숲가꾸기, 임도, 숲길 등 내실있는 산림사업 추진 - 인·허가 적법처리 및 사업장 수시 지도·점검 ◦ 명품 산림의 가치를 지키는 산림보호 활동 - 산불·산사태 등 재해예방·대응체계 확립 - 예찰·적기방제 통한 산림병해충 확산 방지 ◦ 도시경관녹화로 쾌적한 도시 환경 제공 - 도시민을 위한 생활권 주변 도시숲 조성·관리 - 푸른 가로숲이 공존하는 쾌적한 녹색공간 조성 ◦ 소득 창출을 위한 산림소득 증대 지원 - 생산·가공·유통 시설 현대화 ·규모화 추진 - 친환경 재배로 상품경쟁력 강화 및 고품질화 ◦ 백두대간생태교육장 운영 - 맞춤형 프로그램 개발 운영으로 지속 방문유도 - 다양한 산림복합서비스 제공

2019년 주요업무 계획

함파우~소리체험관 테마꽃길 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 오감만족 숲~소리체험관~천문대~김병종미술관~함파우

◦ 사업규모 : L=1㎞ / 화·관목류(수국, 남천, 홍가시, 수수꽃다리 등)

◦ 총사업비 : 200백만원(특별교부세)

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12월

◦ 사업내용 : 주변 관광지를 연계하는 사계절 꽃길조성으로 활성화 도모

□ 추진계획

◦ 전문가 자문(국립수목원, 화훼전문가 등)           :‘19. 1. ~ 2월

◦ 실시설계, 원가심사                               :‘19. 2. ~ 3월

◦ 사업시행                                        :‘19. 3. ~ 4월

◦ 사후관리                                          :‘19. 5. ~ 12월

□ 기대효과

◦ 관광지 내·외곽 유휴지 활용으로 경관개선 및 관광지 홍보 기여

◦ 아름다운 꽃길조성으로 시민정서함양 및 친자연적 산책로 조성

무궁화동산 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 덕과면 사율길 283 일원(3·1운동 기념탑)

◦ 사업규모 : 8,467㎡

◦ 총사업비 : 100백만원(국비 50, 도비 15, 시비 35)

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12월

◦ 사업내용

- 진입로 무궁화 보식, 유휴지 쉼터(벤치, 퍼걸러, 안내판) 조성 등

- 기념탑 주변 관목류 식재

□ 추진계획

◦ 현지조사 및 자체설계                            :‘19. 1. ~  2월

◦ 사업시행                                        :‘19. 3. ~  4월

◦ 사후관리(덕과면, 발전협의회)                      :‘19. 5. ~ 12월

□ 기대효과

◦ 무궁화의 아름다움과 우수성을 널리 알릴 수 있도록 상징성 있는 장소로 부각

◦ 역사적 배경을 통하여 방문객들이 피부로 느낄 수 있는 교육의 장 마련

임 도 사 업

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 일원

◦ 사 업 량 : 38.5㎞

◦ 사 업 비 : 802백만원(균특 520, 시비 282)

◦ 사업내용 : 간선 1.0km, 작업 1.5km, 구조개량 4km, 보수 7km, 지장목제거 25km

※ 기존임도 : 33개 노선 116.414㎞

□ 추진실적

◦ 신    설 : 1.58km/402백만원

- 간선(2년차) : 보절 진기 0.8km / 208백만원

- 작업(2년차) : 대산 풍촌 0.78km / 194백만원

◦ 구조개량 : 산내 입석, 수지 고평 등 9개소 4km / 279백만원

◦ 보    수 : 산내 중황, 대산 신계 등 4개소, 0.9km / 97백만원

◦ 지장목제거 : 인월, 아영 등 6개소 25km,520주 / 27백만원

□ 금후계획

◦‘19년 신설임도 설계	: ‘18. 12월

◦‘19년도 신설임도 사업시행(보절 괴양, 대산 풍촌)	: ‘19. 3. ~ 6월

◦ 구조개량 등 설계용역 및 사업시행	: ‘19. 3. ~ 6월

◦ 임도변 풀베기 등 유지 보수	: ‘19. 6. ~ 10월

◦ 임도관리원(2명) 활용 유지관리	: ‘19. 6. ~ 9월

◦‘20년도 임도신설 사전설계	: ‘19. 12월

숲길 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 왕재산, 고리봉, 교룡산 둘레길 등 9개소

◦ 사 업 량 : 50㎞

◦ 사 업 비 : 467백만원(균특 100, 시비 367)

◦ 사업내용

- 안전시설 및 보수정비 : 왕재산, 고리봉(금지), 덕음산, 교룡산, 덕두봉, 고남산

- 주민참여예산 : 운봉 허브밸리, 고리봉(대강), 교룡산 둘레길 정비 등

※ 기 개설 : 253km(등산로 138km, 백두대간 71km, 둘레길 44km)

□ 추진실적

◦ 백두대간 등산로 및 주요 등산로 정비 : 42.5km/377백만원

- 백두대간(여원제~운봉 매요), 신선자락길(산내 삼화~내령), 견두산, 덕두봉 등산로

◦ 주요등산로 풀베기사업 : 교룡산, 덕음산, 덕두봉/약 20km

□ 금후계획

◦ 사업지 답사 및 설계용역 시행	: ‘19. 1. ~ 2월

◦ 사업시행(시설물 정비 등)	: ‘19. 3. ~ 6월

◦ 등산로변 풀베기 시행(2회)	: ‘19. 6. ~ 9월

◦ 등산로변 도복목 제거 등 수시 민원 처리	:  연중

산불방지 대책

□ 개    요

◦ 임야면적 : 46,910㏊(시 면적의 62.4％)

◦ 사 업 비 : 1,629백만원(국비 282, 도비 223, 시비 1,124)

◦ 대책본부 : 봄철(2. 1. ~ 5. 15.), 가을철(11. 1. ~ 12. 15.)

◦ 진화장비 : 산불진화차, 수송차, 지휘차 등 16종 3,826점

□ 추진실적

◦ 산불위험요인 사전제거 : ‘18. 2. 1. ~ 3. 20./ 11. 1. ~ 12. 15.

◦ 감시원 및 전문예방진화대원 사역    : 225명(봄철 120, 가을철 105)

◦ 임대헬기 배치 : 1대/ 93백만원(남원, 순창, 장수)/ 월락배수지

◦ 입산통제구역 지정 및 등산로 폐쇄   : 7개소 5,801㏊/ 7개 노선 24㎞

◦ 산불소화시설 설치 : 1개소(흥부골자연휴양림)/ 140,923천원

□ 금후계획

◦ 산불위험요인 사전제거 : ‘19. 2. 1. ~ 3. 20./ 11. 1. ~ 12. 15.

◦ 감시원 및 전문예방진화대원 사역    : 207명(봄철 120, 가을철 87)

◦ 임대헬기 배치 : 1대/ 93백만원(남원, 순창, 장수)/ 월락배수지

◦ 입산통제구역 지정 및 등산로 폐쇄   : 7개소 5,801㏊/ 7개 노선 24㎞

◦ 무인감시카메라 점검 및 보수        : 수시

보호수 생육개선 및 쉼터 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 일원

◦ 대 상 목 : 85본(느티 61, 팽나무 4, 소나무 8, 은행 4, 버드 3, 기타 5)

◦ 사 업 비 : 124백만원(도비 7, 시비 117)

◦ 사업내용 : 데크 시설, 외과수술, 영양주사, 가지치기 등

□ 추진실적

◦ 신규 지정 : 아영면 임리 등 1개소 / 느티나무 3본

◦ 외과수술 등 생육개선 : 사매 관풍 등 3개소 / 느티 등 7본 / 39백만원

◦ 쉼터 조성 : 이백 남계 등 6개소 / 8본 / 79백만원

□ 금후계획

◦ 대상지 선정                                : ‘19. 1. ~ 2월

◦ 실시설계 및 사업 시행                      : ‘19. 3. ~ 6월

◦ 병해충 등 모니터링                         :  연중

산림병해충 방제

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 일원

◦ 사 업 량 : 81ha

◦ 사 업 비 : 287백만원(국비 42, 도비 18, 시비 227)

◦ 사업내용 : 소나무재선충, 흰불나방, 오리나무잎벌레, 갈색날개매미충 등                  산림병해충 방제 및 예방

□ 추진실적

◦ 예찰활동 : 2. ~ 12월(11개월)/ 방제단 6명

- 예찰활동, 시료채취, 고사목제거, 산림병해충 방제 등

- 소나무 재선충병 조기발견 위한 시료 검경의뢰 : 1,428본

◦ 생활권 수목진료 민간컨설팅 : 1. 22. ~ 10. 31.(기간 중 35회 진단)

◦ 소나무재선충병 예방나무주사사업 : 673본(보호수, 마을숲 등 18개소)

◦ 해충퇴치기 설치 : 22대(에코롯지 19, 체험휴양시설 3)

◦ 꽃매미 등 알집제거 : 2ha

◦ 갈색날개매미충 등 기타 해충방제 : 174ha

□ 금후계획

◦ 예찰활동                               :  연중

◦ 재선충병 시료 검경의뢰                 :  연중

◦ 소나무재선충병 예방나무주사 사업 시행  : ‘19. 2월, 11월

◦ 해충퇴치기 설치(향기원, 오감만족숲)     : ‘19. 2. ~  5월

◦ 수목진료생활권 산림병해충 민간컨설팅   : ‘19. 2. ~ 10월

◦ 지상방제 시행                          : ‘19. 2. ~ 10월

숲가꾸기사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 일원

◦ 사 업 량 : 890ha

◦ 사 업 비 : 1,393백만원(국비 697, 도비 209, 시비 487)

◦ 기    간 : 2019. 1. ~ 12월

◦ 내    용

- 조림지가꾸기 640ha/980백만원(조림 당년 ~ 3년)

- 어린나무가꾸기 100ha/153백만원(조림 후 5 ~10년)

- 큰나무가꾸기 150ha/260백만원(조림 15년 후)

□ 추진실적

◦ 조림지가꾸기 : 송동면 등 14개 면․동 949ha/1,195백만원

◦ 어린나무가꾸기 : 운봉읍 등 14개 면․동 150ha/184백만원

◦ 큰나무가꾸기 : 대산면 등 17개 읍․면․동 417ha/743백만원

□ 금후계획

◦ 2019년도 큰나무가꾸기사업 사전설계 : 110ha/10백만원, 12월한

◦ 숲가꾸기 종합계획 수립             : ‘19. 1월

◦ 대상지 선정 및 산주 동의서 징취    : ‘19. 1. ~ 12월

◦ 사업별 설계용역                    : ‘19. 1. ~ 11월

◦ 사업시행                           : ‘19. 1. ~ 12월

도시숲 조성 및 가로수 관리

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 유휴지, 자투리땅, 시유림 / 읍·면·동 가로수 전체

◦ 사 업 량 : 도시숲 1.0㏊, 가로수 조성 2㎞, 가로수 관리 335㎞(50,283주)

◦ 사 업 비 : 1,376백만원(균특 600, 시비 776)

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12월

◦ 사업내용 : 미세먼지 ·폭염저감 시민만족도 높은 다양한 유형의 도시숲 조성

가로수 2열(복층식재), 가로수 띠녹지(초본·관목류) 조성 확대

수형관리, 병충해 관리

□ 추진실적

◦ 덕음산 오감만족 숲(대규모 도시숲, 1.2㏊) 조성 완료

- 승월폭포 주변, 20억원 / 입구광장, 숲속놀이터, 편백나무숲, 바람언덕, 명상원 등

◦ 도시숲 조성(시민화단, 덕음산 솔바람길·철쭉공원)

- 소나무·자산홍·실편백 등 6종 29,860본, 꽃무릇·구절초 등 4종 570,581본

◦ 가로수 신식(노송로, 황산로, 오들로, 용성중로, 동남원 IC, 대강 입암선)

- 왕벚·배롱·이팝나무 등 3종 570주, 자산홍 14,168주

◦ 가로수 보식(아영 풍천변, 주천선, 요천 100리숲길)

- 왕벚·살구나무 등 2종 173주

◦ 하층식재(용정교~옛 서남대)

- 금계국 60,956본

□ 금후계획

◦ 도시림등의 조성·관리 심의 위원회 구성, 심의       : ‘19. 1월

◦ 현지조사 및 실시설계                            : ‘19. 2. ~  3월

◦ 도시숲 조성(춘기·추기) 시행                     : ‘19. 3. ~ 11월

◦ 사후관리(수목급수 및 병해충방제 등)              :  연중

산림소득 증대사업

□ 개    요

◦ 사업대상 : 임업인 또는 생산자단체

◦ 사 업 량 : 임산물상품화사업 등 7개 사업

◦ 사 업 비 : 911백만원(국비 563, 도비 104, 시비 244)

◦ 사업내용

- 임산물상품화지원, 친환경임산물재배관리, 생산단지조성(소액), 임산물   생산기반조성, 임산물유통기반조성, 백두대간주민소득지원, 목재펠릿   보일러 보급

□ 추진실적

◦ ‘19년 농림사업 신청 접수 및 대상자 심의 : ‘18. 2. ~ 3월/ 113농가

◦ 임산물 유통구조개선 : 상품화지원 및 유통기반 조성/ 193백만원

◦ 산림작물생산기반조성 : 생산기반조성, 친환경임산물재배 등 4개사업/ 366백만원

◦ 목재펠릿보일러, 산림소득작물 재배지원사업/ 69백만원

◦ 백두대간 주민소득 지원사업/ 307백만원

□ 금후계획

◦ 추진계획 수립 및 통보                  : ‘19. 1월

◦ 신청서 접수 및 대상자 확정             : ‘19. 2월

◦ 교부결정 및 사업시행                   : ‘19. 2. ~ 4월

◦ 준공 및 사업비 정산                    : ‘19. 4. ~ 12월

조 림 사 업

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 임야

◦ 사 업 량 : 267ha(경제림 120ha, 재해방지조림 15ha, 미세먼지저감조림 50ha,

편백나무피해지복구 66ha, 풍경있는 농산촌가꾸기 16ha)

◦ 사 업 비 : 1,500백만원(국비 637, 도비 259, 시비604)

□ 추진실적

◦ 경제림조성 : 아영면 등 14개 읍‧면‧동 : 220ha / 795백만원

◦ 큰나무공익조림 : 송동면 흑송리 705 외 4개소 : 10ha / 94백만원

◦ 산림재해방지조림 : 송동면 등 14개 읍‧면‧동 : 50ha / 157백만원

◦ 지역특화림조성 : 둘레길 (운봉, 주천, 인월)특화림 조성 : 25ha / 444백만원

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 시행                    : ‘18. 12월 ~ ‘19. 1월

◦ 봄철 나무심기 시행                   : ‘19.  2. ~  4월

◦ 조림지 활착상황 조사                 : ‘19.  6. ~  9월

◦ 가을철 나무심기 시행                 : ‘19.  9. ~ 11월

◦‘20년도 실시설계용역 시행             : ‘19. 11. ~ 12월

창조적 마을 만들기

□ 개    요

◦ 일반농산촌개발사업 : 5개소

- 공동문화복지 : 주천 내송

- 환경경관생태 : 산내 내령·와운마을

- 산림휴양치유마을 : 주천 노치, 산내 달궁

◦ 총사업비 : 2,500백만원(균 1,750, 시 750)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2020년

◦ 사업내용 : 마을회관 리모델링, 생태공원조성, 쓰레기집하장설치,                     산책로 개설 등

□ 추진실적

구 분		사업 내용	사업비 (백만원)	사업기간	사업자
계			810
시설공사	내령	눈꽃길 경관개선, 포켓공원조성 등	201	‘18. 6. 22. ~ ’19. 6. 16.	(유)한성산업개발(공정율45%)
	내송	공동생활홈 신축(건축,통신,전기) 등	185	‘18. 8. 20. ~ ’19. 7. 6.	(유)범한(공정률 55%)
	와운	천년송 생태공원, 생태하천정비 등	287	‘18. 10. 1. ~ ’19. 9. 30.	㈜새한(공정률50%)
역량 강화	내령 내송 와운	지역역량강화사업	137	‘18. 7월 ~ ’18. 12월	완료

□ 금후계획

【노치마을】

◦ 기본계획 및 실시설계용역                        : ‘19. 1. ~ 4월

◦ 사업발주 및 시행                                 : ‘19. 5. ~ 12월

【내령․내송․와운 마을】

◦ 시설공사 추진 (내송, 내령, 와운)                  : ‘19. 3. ~ 9월

【달궁마을】

◦ 기본계획 및 실시설계용역                       : ‘19. 1. ~ 4월

◦ 실시설계 협의(전북도)                               : ‘19. 5. ~ 6월

백두대간 생태교육장 운영

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍 운봉로 151일원 / 행정공안길 299일원

◦ 면    적 : 전시관(에코롯지·캠핑장) 78,028㎡/ 체험휴양시설 210,545㎡

◦ 사 업 비 : 913백만원(전시관 612, 체험휴양시설 128, 에코롯지 133, 캠핑장 4)

◦ 사업내용 : 특별전 개최, 체험휴양시설 운영, 에코롯지, 캠핑장 운영,

유아숲체험원 운영 등

□ 추진실적(‘18. 12. 19. 기준)

【전 시 관】

◦ 운영실적

- 방문객 61,104명(무료 40,171, 유료 20,933)/ 수입금 61백만원

◦ 특별전 개최(4회)

- 겨울방학 특별전(‘17. 12. 23. ~ ‘18. 02. 11.)/ 15,691명

- 봄철 소규모 특별전(‘18. 05. 05. ~ ‘18. 05. 22.)/  3,598명

- 여름방학 특별전(‘18. 07. 21. ~ ‘18. 08. 14.)/ 20,841명

- 추석맞이 소규모 특별전(‘18. 09. 22. ~ ‘18. 10. 03.)/ 2,017명

◦ 물놀이장 조성(‘18. 1. ~ 6. ) / 500백만원

◦ 유아숲체험원 조성(‘18. 1. ~ 6.) / 150백만원

【체험휴양시설】

◦ 운영실적

- 트리하우스 : 11,583명/ 399동/ 수입금 41백만원

◦ 힐링캠핑장 조성(‘18. 1. ~ 6.) / 50백만원

【에코롯지·캠핑장】

◦ 운영실적

- 에코롯지 : 544동/ 수입금 68백만원

- 캠 핑 장 : 2,016면/ 수입금 50백만원

□ 금후계획

【전 시 관】

◦ 특별전 개최                      : ‘18. 12. ~ ‘19. 1월, 7월~8월 / 90백만원

◦ 물놀이장 운영                    : ‘19. 6. ~ 8월 / 15백만원

◦ 생물테마 전시·체험시설(환경과)   : ‘18. 11. ~ ‘19. 4월 / 751백만원

【체험휴양시설】

◦ 백두대간 트리하우스·힐링캠핑장 운영 : ‘19. 1. ~ 12월 / 128백만원

【에코롯지·캠핑장】

◦ 유아숲체험원 운영                  : ‘19. 1. ~ 12월 / 25백만원