2019. 1.

2019년 주요업무 계획

건   설   과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2018년 주요업무 결산

□ 2019년 중점 추진방향

□ 2019년 주요업무 계획

◦ 2018~2019 도로 설해대책

◦ 도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 변경 용역

◦ 읍면지역 시도 확포장

◦ 농어촌도로 확포장

◦ 통행불편 마을 진입로 정비

◦ 위험도로 선형 개선

◦ 도로 유지관리사업

◦ 지방하천 정비사업

◦ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업

◦ 소하천정비 종합계획 재수립 용역

◦ 소하천 정비사업

◦ 요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성

◦ 하천 유지관리사업

일  반  현  황

□ 기    구

											건 설 과 장
											진 영 신
건설행정담당										도로담당														하천담당
정 덕 량										성 길 경														백 강 규
도로 유지관리․보수 도로 점․사용허가 지하수 신고․허가 국․공유재산관리 노점상․과적단속										읍면시도확․포장사업 농어촌도로확․포장사업 기업유치 기반시설 확충사업 통행불편 도로사업 도로 유지관리사업														치 수 사 업 하천유지관리 육상골재채취․허가 공유수면관리 하천점․사용허가

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	40	1	3	7	4	6	□청원경찰 : 7 □공 무 직 : 12
현 원	37	1	3	8	3	4	□청원경찰 : 5 □공 무 직 : 13 - 휴직(1) 포함
증 감	△3	-	-	1	△1	△2	□청원경찰 : △2 □공 무 직 : 1

2018년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 시민 만족 중심의 도로·하천 유지관리 추진 - 신속하고 완벽한 제설작업으로 도로이용불편 최소화(20일) - 도로 갓길 및 주요하천 제방, 둔치길 제초작업 추진(4회) - 민원사항 즉시처리 및 시설정비 예산우선투자로 도로유지관리 만전 ·읍면지역시도 19건, 농어촌도로 12건, 시가지 법정도로 34건 / 7,759백만원 - 주민 불편사항(시정 설명회, 월례회의 지속 건의사항) 해결을 위한 전라북도 도로관리사업소 사업 지속 건의 ·추진사업 : 수지 호곡(L=0.97㎞, 8억원), 산내 대정(L=0.1㎞, 1억원), 산내 덕동(L=0.23㎞, 3억원), 주천 송치(L=0.5㎞, 4.1억원) ◦ 관내 주요 간선 도로망 확충을 위한 국가예산 확보에 총력 - 순천~완주간 고속도로 춘향 휴게소 설치 건의 반영(상하행 2개소 / 300억원) - 국도․국지도 건설 5개년 계획(`21~`25) 건의사업(9개) 중 5개 사업에 대해 도로안전개선계획 수립 연구용역 결과 종합위험도 50%이상으로 계획 반영 가능성 제고 ※ 국도 24호선(이백~운봉) 2차선 개량 외 4개사업 / 2,458억원 ◦ 지방하천 정비사업 총사업비 변경 승인 - 람 천 고향의강 정비사업 (승인일 : ‘18. 05. 08) [당초 21,122백만원 ➛ 변경 20,221백만원 (감 901백만원)] ◦ 신규 국비보조사업 확보 - 오롱골소하천 정비사업 : 총1,900백만원 (국비 950, 시비 950) 2019년 : 372백만원 (국비 186, 시비 186) ◦ 지방하천 정비사업 준공 - 람 천 고향의강 정비사업 : L=5.3km / 2015 ~ 2018년 / 20,221백만원 - 갈치천 지방하천 정비사업 : L=4.3km / 2015 ~ 2018년 / 8,051백만원 ◦ 남원시 지방하천정비 평가 최우수기관 선정 - 도내 14개 시‧군 대상 지방하천에 대한 제방, 호안, 하상정비 등 하천관리에 최우수기관으로 선정

□ 지역 균형 발전을 위한 도로개설 – 24개지구 / 8,400백만원

(24개 지구 중  5개 지구 완공) - 추진공정 21%

◦ 읍면지역시도 확포장 4개 지구 / 1개 지구 완공(L= 7.70km/2,000백만원)

◦ 농어촌도로 확포장   6개 지구 / 1개 지구 완공(L= 8.55km/3,300백만원)

◦ 통행불편 마을진입로 9개 지구 / 1개 지구 완공(L= 5.24km/1,400백만원)

◦ 위험도로 선형개량   5개 지구 / 2개 지구 완공(L= 1.95km/1,700백만원)

□ 안전하고 쾌적한 도로 유지관리 – 9개분야/65개소/7,759백만원

(65개 지구 중 57개 지구 완공) - 추진공정 87% / 국 41, 도 552, 특교세 600

◦ 읍면지역시도 유지관리사업 추진	: 19개소 /	1,300백만원

◦ 농어촌도로 유지관리사업 추진	: 12개소 /	1,500백만원

◦ 동지역 도로 유지관리사업 추진	: 29개소 /	2,734백만원

◦ 주천 용궁마을 스노멜팅 설치 추진	: 1개소  /	181백만원

◦ 노암4가 회전교차로 설치 추진	: 1개소  /	400백만원

◦ 산내 달궁마을 노후 인도 정비 추진	: 1개소  /	1,000백만원

◦ 주천 회덕마을 세월교 정비 추진	: 1개소  /	600백만원

◦ 남원대교~동림교 중앙분리대 설치 추진	: 1개소  /	44백만원

◦ 도로 제설작업(2017~2018)	: 20일(57개노선, 431.5㎞)

□ 재해 사전예방을 위한 하천 정비 – 80개소 / 10,949백만원

◦ 하천 정비(지방하천, 소하천)	: 7개소  / 6,755백만원

◦ 원천천 하천정비 및 친수공간조성	: 1개소  / 1,000백만원

◦ 소하천정비 종합계획 재수립 용역	: 3개소  / 1,137백만원

◦ 하천 하도준설	: 39개소 /   554백만원

◦ 하천 호안 및 제방 정비 추진	: 30개소 /   813백만원

	아쉬운 점
◦ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업 실시설계 용역이 익산청과 협의 지연으로 용역 추진이 중지된 상태에 있음 - 익산청에서 시행 중인 『요천권역 하천기본계획 재수립 용역』치수 타당성 분석 결과 하천구역(친수공간)으로 지정이 어려움 □ 생활 밀착형 SOC 사업을 통한 접근으로 요천지구 수변 생태레저 공원 조성사업이 추진될 수 있도록 지속적 대응 추진

◦ 수해복구사업	: 1식     /   690백만원

2019년 중점 추진방향

건강하고 안전한 도로‧하천 환경 조성

	중 점 추 진 과 제
◦ 생활 밀착형 SOC 시설물 확충 - 여가·휴식공간 제공을 위한 요천제방 걷고 싶은 가로 조성 - 시민 활력을 위한 요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성 ◦ 안전중심 도로환경 - 신속한 제설작업으로 겨울철 안전한 도로 제공 - 위험도로 구조개선으로 주민 생명권․재산권 보호 ◦ 체계적인 도로망 개설 - 환경적 여건 변화를 반영한 도로망 기본계획 수립 - 시(군도) 및 농어촌도로 정비로 주민 소득기반 확충 ◦ 자연이 숨 쉬는 하천 - 환경적 여건변화를 반영한 하천정비종합계획 재수립 - 미개수하천의 자연친화적 생태하천 조성

2019년 주요업무 계획

2018~2019 도로 설해대책

□ 개    요

◦ 운영 기간 : 2018. 11. 15. ~ 2019. 3. 15.(4개월간)

◦ 제설 대상 : 법정관리도로 총 57개 노선 431.5km

계		시 관리국도		지 방 도		시 도		읍면시도(군도)
노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량
57	431.5	3	25.1	8	154.9	24	38.5	22	213

◦ 제설 인력 : 26명(도로보수원 10, 운전원 10, 기타 6)

◦ 제설 차량 : 13대〔15톤 6(임차3), 5톤 2(임차1), 1톤 4(임차2), 굴삭기1〕

◦ 제설 장비 : 241대

- 자체 보유 : 제설기  12대(15톤용 6/ 5톤용 1/ 1톤용 5)

살포기  12대(15톤용 6/ 5톤용 1/ 1톤용 5)

- 읍면동(19) : 제설기 217대(트랙터용 214/ 1톤용 3)

◦ 제설 자재 : 염화칼슘 70톤 / 소금 832톤 / 친환경 제설제 635톤

◦ 상황실 운영 : 건설과(2개조 6명), 각 읍면동사무소

□ 추진실적

◦ 5톤트럭 살포기 및 제설기 구입	: 10월

◦ 읍면동 트랙터용 제설기 및 원터치 보급	: 11월

- 제설기 11대 / 원터치 50대

◦ 미끄럼주의표지판(22개) 및 모래주머니(20,000매) 설치	: 11월

◦ 임차장비 용역시행(15톤 3대, 5톤 1대, 1톤 2대)	: 11월

◦ 친환경 제설제 구입	: 12월

□ 금후계획

◦ 상황실[건설과(2개조 6명), 읍면동] 운영	: `18. 12. ~ `19. 3.

◦ 설해대책을 위한 제설장비 대기	: `18. 12. ~ `19. 3.

◦ 읍면동 트랙터용 제설기 보급(교체3, 신규7)	: `19. 1. ~

도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 변경 용역

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 읍·면 지역

◦ 사 업 량 : 읍면지역시도 및 농어촌도로 353개 노선 L=852.6㎞

- 읍면지역시도 : 22개 노선, 215.1㎞ / 농어촌도로 : 331개 노선, 637.5㎞

◦ 사 업 비 : 500백만원(시비)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2019년(2개년)

※ 관련법 □ 도로법 제6조(도로건설․관리계획의 수립 등) : 읍면지역시도

□ 농어촌도로정비법 제7조(도로정비계획의 수립) : 농어촌도로

□ 추진실적

◦ 기본계획 변경 용역 수행	: `18.  4. ~

- 상위계획 검토 및 실과소 자료 수집 / 교통량 조사 실시

- 시군도 및 농어촌도로 각 노선별 현장조사(연장, 도로폭, 시설물 조사 등)

- 도시 교통 현황 분석 및 실태 조사(실과소 수집 자료와 현장 점검)

◦ 기본계획 변경 용역 1차 검토(군도 노선)	: `18. 10.

◦ 농어촌도로 전략환경영향평가 / 사전재해영향성검토 용역 착수	: `18. 11.

□ 금후계획

◦ 기본계획 변경 용역 수행(도로망 검토 및 연차별 투자계획 등)  : `19. 1. ~

◦ 관련부서(기관) 및 인접 지자체 협의	: `19. 1. ~ 2.

◦ 전략환경영향평가 및 사전재해영향성검토 용역 수행    : `19. 1. ~ 5.

◦ 도로 노선 지정 승인(시⇒전북도)	: `19. 5. ~ 7.

◦ 도로건설 관리계획 수립 및 농어촌도로 변경 고시	: `19. 8.

읍면지역 시도 확포장

□ 개    요

◦ 계    획 : 19개 사업 / 36.46㎞ / 68,830백만원

◦ 기 투 자 : 15개 사업 / 28.46㎞ / 48,930백만원

◦ 시 행 중 :  4개 사업 /  8.00㎞ / 19,900백만원(※ 2019 : 2,600백만원)

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2022년(17개년)

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2019	2020이후
합 계	4개사업	8.00	19,900	2,300	2,600	15,000	25
도산~서매(신규)	주생면	1.90	3,000		400	2,600	13	`19 ~ `22
부석~오촌	송동면	2.60	5,900	900	700	4,300	27	`17 ~ `21
오리정~상신	사매면	1.00	2,300	400	500	1,400	39	`17 ~ `20
평촌~강기	이백면	2.5	8,700	1,000	1,000	6,700	23	`17 ~ `21

※ 전체 현황 : 22개 노선 / 215.1㎞ 중 130.6㎞ 완료(포장률 60.7%, 전북 54.9%)

□ 추진실적 – 공사중(2개소), 설계용역(1개소)

◦ 부석~오촌   : 용지보상 추진(8.29.~), 1차분 착공(2018. 12. 28)

◦ 오리정~상신 : 관련기관 협의(산지전용․하천점용/`18.6.), 1차분 착공(2018. 12. 28)

◦ 평촌~강기	: 실시설계용역 완료(`18.11.30.), 관련기관 협의(소규모 환경영향평가, 비관리청 공사 허가)

□ 금후계획 – 설계 및 보상(1개소), 계속(3개소)

◦ 도산~서매	: 실시설계용역 추진(`19.1. ~ 6.), 용지보상(`19.6. ~ 12.)

◦ 부석~오촌   : 용지보상 추진(`19.1. ~  6.), 공사 추진(`19.1. ~ `21.12.)

◦ 오리정~상신 : 용지보상 추진(`19.1. ~  6.), 공사 추진(`19.1. ~ `20.12.)

◦ 평촌~강기   : 관련법 인‧허가 협의사항 보완 및 용지보상(`19.1. ~  5.), 공사발주(`19. 5.)

농어촌도로 확포장

□ 개    요

◦ 계    획 : 22개 사업 / 25.21㎞ / 44,824백만원

◦ 기 투 자 : 17개 사업 / 17.11㎞ / 29,024백만원

◦ 2019시행 :  5개 사업 /  8.10㎞ / 15,800백만원(※ 2019 : 2,200백만원)

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2023년(18개년)

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2019	2020이후
합 계	5개사업	8.10	15,800	2,900	2,200	10,700	32
배촌선(신규)	주천면	2.20	4,000		200	3,800	5	‘19 ~ ‘21
장항교 재가설	산내면	0.30	2,800	2,300	500		100	‘17 ~ ‘19
도용선	주생면	1.00	1,500	300	700	500	67	‘17 ~ ‘20
상황선	산내면	0.60	1,500	50	500	950	37	‘18 ~ ‘20
견두선	수지면	4.00	6,000	250	300	5,450	9	‘18 ~ ‘23

※ 전체 현황 : 331개 노선 / 637.5㎞ 중 180.7㎞ 완료(포장률 28.3%, 전북 34.3%)

□ 추진실적 – 공사중(3개소), 설계중(2개소)

◦ 장항교 재가설	: 1차분 준공(6.18.), 2차분 추진(교량 상부공)	/ 공정률 75%

◦ 도 용 선	: 1차분 공사 착공(`18.12.), 용지보상 추진(11.5.~)

◦ 상 황 선      : 실시설계용역 추진(공정률 85%), 주민 설명회 2회 개최

◦ 견 두 선      : 실시설계용역 추진(공정률 20%)

◦ 행 덕 선(사고) : 1차분 준공(12.21.), 2차분 추진 / 공정률 40%

□ 금후계획 – 완공(2개소), 계속(2개소), 보상 및 설계(2개소)

◦ 배 촌 선    : 실시설계용역 발주 및 추진

◦ 장항교 재가설	: 공사 완료(`19.6.)

◦ 도 용 선	: 용지보상 및 공사 추진, 농어촌도로 노선 지정(변경) 절차 이행

◦ 상 황 선      : 원가 심사 및 용지보상, 공사 발주(`19.1.~`19.12.)

◦ 견 두 선       : 실시설계용역 완료(`19.5.), 용지보상 추진(`19.6.~)

◦ 행 덕 선(사고) : 공사 완료(`19.12.)

통행불편 마을 진입로 정비

□ 개    요

◦ 2019 시행 : 5개 사업 / 3.1㎞ / 1,700백만원

사 업 명	읍면	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2019	2020이후
합 계	5개사업	3.10	6,550	2,350	1,700	2,200	57
배산마을	덕과면	0.40	600	50	300	250	58	‘18 ~ ‘19
안대실마을	대산면	0.75	1,600	50	300	1,250	22	‘18 ~ ‘20
중군마을	인월면	0.80	1,550	950	600		100	‘17 ~ ‘19
신지마을	아영면	0.35	1,200	900	(300)		50	‘17 ~ ‘19
내황마을	보절면	0.80	1,600	400	500	700	56	‘17 ~ ‘19

□ 추진실적 – 공사 중(3개소), 설계 완료(2개소)

◦ 덕과 배산마을 : 실시설계용역 완료(`18. 12.)

◦ 대산 안대실마을 : 실시설계 용역 완료(`18. 12. 18.)

◦ 인월 중군마을 : 1공구(L=0.6㎞) 공사 완료, 2공구 설계용역 착수(`18.12.)

◦ 아영 신지마을 : 1차분 공사 착공(`18. 11.), 용지보상 추진(`18. 11.~)

◦ 보절 내황마을 : 1차분 공사 착공(`18. 12.), 용지보상 추진(`18. 12.~)

□ 금후계획 – 완공(2개소), 공사중(3개소)

◦ 덕과 배산마을 : 행정절차 이행 및 1차분 공사 착공(`19.1. ~ 12.)

◦ 대산 안대실마을 : 용지보상 추진 및 공사 착공(`19.1. ~ 12.)

◦ 인월 중군마을 : 2공구(L=0.2㎞) 실시설계용역 및 공사 발주(`19.1. ~ 12.)

◦ 아영 신지마을 : 용지보상 및 1차분 공사 추진

◦ 보절 내황마을 : 농어촌도로 노선 지정(변경) 절차 이행 및 1차분 공사 추진(`19.1. ~ 12.)

위험도로 선형 개선

□ 개    요

◦ 2019 시행 : 4개 사업 / 2.05㎞ / 1,200백만원

사 업 명	읍면	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2019	2020이후
합 계	4개사업	2.05	2,800	600	1,200	1,000	64
운봉 방현	운봉읍	0.20	400	50	350		100	‘18 ~ ‘19
수지 남창	수지면	0.40	500	50	150	300	40	‘18 ~ ‘19
아영 율동	아영면	0.15	300	50	250		100	‘18 ~ ‘19
군도 29호선 (지리산IC~아영)	아영면	1.30	1,600	450	450	700	56	‘17 ~ ‘20

□ 추진실적 – 공사중(1개소), 설계용역(3개소)

◦ 운봉 방현 : 실시설계용역 착수(`18. 12.) / 2회 추경 예산

◦ 수지 남창 : 실시설계용역 착수(`18. 12.) / 2회 추경 예산

◦ 아영 율동 : 실시설계용역 착수(`18. 12.) / 2회 추경 예산

◦ 군도 29호선 : 1차분 공사 착공(`18. 7.), 용지보상 추진

□ 금후계획 – 완공(2개소), 계속(2개소)

◦ 운봉 방현 ․ 수지 남창 ․ 아영 율동

: 주민설명회(`19. 1.), 행정절차 이행 및 공사 발주(`19. 3.)

◦ 군도 29호선 : 용지보상 및 2차분 공사 추진(`19.1. ~ 12.)

도로 유지관리사업

□ 개    요

◦ 총사업비 : 6,590백만원(국비 175, 도비 60, 시비 6,355)

사 업 명		위 치	사업량	사업비 (백만원)	비고
합 계				6,590
	소 계			4,640
	읍면지역 시도	관내	22개 노선, L=215.1㎞	600
	농어촌도로	관내	331개 노선, L=637.5㎞	600
	법정도로 유지관리(동지역)	관내	시의 국도․지방도․시도	3,440	교량 전수조사 등
동림교 교통사고 잦은곳 개선		죽항동	가각부 개선, 교통안전시설	70	국 35 시 35
고죽교차로 회전교차로 설치		고죽동	회전교차로 설치 1식	280	국 140 시 140
법정관리 시설물 안전점검용역		관내	교량 8개소 정밀안전점검	150	도 60 시 90
고죽~갈치교차로 도로확포장공사		고죽동	도로 확포장 L=310m	1,000	시 1,000
사매 용북중 인도 정비공사		사매면	인도개설 L=0.65㎞	450	시 450

□ 추진실적(2018년)- 65개지구/7,759백만원

◦ 읍면지역시도(18개 지구, 1,300백만원, L=4.28㎞) 추진        : `18. 1. ~ 12.

◦ 농어촌도로(12개 지구, 1,500백만원, L=3.23㎞) 추진    : `18. 1. ~ 12.

◦ 법정도로(동지역) 유지관리(29개 지구, 2,134백만원, L=4.33㎞) 추진 : `18. 1. ~ 12.

◦ 공사 완료 : 노암4가 회전교차로, 남원대교~동림교 중분대, 주천 스노우멜팅)

◦ 공사 중 : 산내 달궁 인도정비, 주천 회덕 세월교 정비, 소방서 앞 도로 확포장공사

□ 금후계획

◦ 읍면지역시도․농어촌도로․동지역 법정도로 유지관리 추진 : `19. 1. ~ 12.

- 아스콘 재포장, 과속방지턱, 교량(터널)유지관리, 배수개선, 시설물 정비 등

◦ 공사 완료 : 동림교 교통사고 잦은 곳, 고죽교차로 회전교차로,

산내 달궁 인도정비, 주천 회덕 세월교, 사매 용북중 인도

◦ 공사 추진 : 고죽~갈치교차로 도로 확포장

지방하천 정비사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 아영면 풍천 외 4개소

◦ 사업기간 : 2012 ~ 2022년 (11개년)

◦ 총 계 획 : 21개지구 / 98.43㎞ / 190,771백만원

- 완료지구 : 7개지구 / 35.47㎞ /  77,646백만원

(송내천, 내척천, 괴양천, 진기천, 백암천, 운교천, 풍천, 요천, 수외천, 수지천, 주촌천 등)

- ‘19년 사업 : 4개지구 / 7,084백만원〔국비 3,542, 도비 1,417, 시비 2,125〕

하천별	지구별	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2019	2020이후
합 계	4개하천	23.87	70,192	19,384	7,084	43,724	25
풍 천	소 계	5.53	37,351	13,284	2,724	21,343	35	`14 ~ `22
	청계지구	0.88	6,961	6,961			100	`17년준공
	풍천지구	4.65	30,390	6,323	2,724	21,343	21	`18 ~ `22
송치천	주천송치	2.04	9,466	3,500	1,720	4,246	37	`16 ~ `20
원천천	신촌~주천	14.6	18,821	1,800	2,400	14,621	10	`17 ~ `22
다산천	덕과만도	1.7	4,554	800	240	3,514	18	`18 ~ `22

□ 추진실적

◦ 갈치천(식정) : 호안공 L=1.32km, 교량2개소, 취입보 3개소 완료    / 공정률 100%

◦ 풍  천(인월·두락·의지) : 도 지방건설기술심의, 공사 입찰완료        / 공정률 35%

◦ 람천(행정) : 호안공 L=1.2km, 보 3개소, 인도교 2개소, 대공 1개소   / 공정률  100%

◦ 송치천 : 교량 2개소, 낙차공, 토지보상 병행 협의	/ 공정률  37%

◦ 원천천 : 실시설계 용역 추진(익산청, 국토부, 전북도 / 4회)          / 공정률  10%

◦ 다산천 : 실시설계 용역 추진(현황 및 기초조사 / 지반조사 등)     / 공정률  18%

□ 금후계획

◦ 풍  천 □ 인월지구 편입용지 보상	: ‘19.  1월

□  공사 추진	: ‘19.  1월 ~ ‘22. 12월

◦ 송치천 : 3차분 공사 추진	: ‘19.  1월 ~ ‘19.  6월

◦ 원천천 □ 지방건설기술심의 및 총사업비 변경승인 : ‘19.  4월

□ 조달청 원가심사 및 공사 발주    : ‘19.  6월

◦ 다산천 □ 실시설계 완료 및 총사업비 변경승인 : ‘19.  4월

□ 조달청 원가심사 및 공사 발주    : ‘19.  6월

원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도통동 인도교 ~ 주천면 고기리

◦ 사 업 량 : 관광자원화 친수공간조성 L=15.6㎞ (원천천 14.6㎞, 요천 1.0㎞)

- 축제 2.48km, 자전거길 7.8㎞, 보․낙차공 18개소, 교량 10개소 등

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2021년(5개년)

◦ 총사업비 : 20,510백만원〔국 11,100(54%), 도 3,760(18%), 시 5,650(28%)〕

- 요  천 (국가하천  1.0km / 익산청)  :   1,689백만원(국 100%)

- 원천천 (지방하천 14.6km / 우리시)  : 18,821백만원(국 50%, 도 20%, 시비30%)

※‘19년도 사업비 : 2,400백만원

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진 (총용역비 1,245백만원)      : ‘16.  9. 28. ~ ‘19. 6. 30.

◦ 착수보고회 및 자문위원 사업설명회 개최	: ‘16. 10. 21.

◦ 기본 및 실시설계 (안) 확정	: ‘18.  5.  3.

- 익산청 하천계획과 협의 완료 (현장 방문, 3회 협의)

◦ 용역 중간보고회 개최(시장)	: ‘18.   8.  3.

◦ 실시설계 (안) 총사업비 변경 협의(1차) / 익산청	: ‘18.  11. 22.

- 사업비 : 당초 MP상 18,821백만원 → 24,147백만원(증5,326)

◦ 주민설명회 개최	: ‘18.  11. 29.

□ 금후계획

◦ 설계 적정성검토, 기술자문, 건설심의 (전북도)  : ‘19.  2월 ~  6월

◦ 총사업비승인 협의절차 이행 (익산청 / 국토부)  : ‘19. 3월 ~

◦ 공사발주 및 사업 추진	: ‘19. 7월

소하천정비 종합계획 재수립 용역

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 관내 소하천 347개소 (L=389.6㎞)에 대한 종합계획 재수립

◦ 총사업비 : 5,837백만원 (시비 100%) / ◦ 용역기간 : 2015 ~ 2019년 (5개년)

◦ 용역대상 : 347개소 / L=389.6㎞를 2개 권역으로 분할 용역 발주 추진

◦ 법적근거 : 소하천정비법 제6조(소하천정비종합계획의 수립) 및 같은법 수행규칙 제3조

(단 위 : 백만원)

권 역 별	사업량	총사업비	기투자	2019	2020이후	용역기간
합 계	347개소/L=389.6㎞	5,837	5,837			`15 ~ `19
섬진강 권역	272개소/L=292.4㎞	3,572	3,572			‘15 ~ ‘19
낙동강 권역	75개소/L=97.2㎞	1,315	1,315			‘16 ~ ‘19
전략환경평가	전구간	950	950			‘17 ~ ‘19

□ 추진실적

◦ 소하천정비종합계획 재수립용역 시행

- 섬진강 수계 :‘15. 7. 31 - 낙동강 수계 :‘16. 4. 15 - 전략환경영향평가 :‘17. 9. 20.

◦ 소하천 중복지정 관리기관 협의(한국농어촌공사 남원지사)  : ‘15. 10. / ‘18. 11.

◦ 소하천관리위원회 구성 및 위원 위촉	: ‘17. 10. 27.

◦ 전략환경영향평가 초안 공람 및 주민설명회 개최	: ‘18.  9. 10. ~ 11. 13.

□ 금후계획

◦ 소하천의 조정 지정에 따른 전북도 자연재난과 협의	: ‘19.  1월

◦ 전략환경영향평가 본안 제출	: ‘19.  2월

◦ 기초 소하천 관리위원회 심의	: ‘19.  2월

◦ 광역 소하천 관리위원회 심의	: ‘19.  5월

◦ 소하천대장 전산화 및 지형도면고시, 사업완료	: ‘19.  6월

소하천 정비사업

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 30개지구 / 20.78㎞ / 44,511백만원

- 완료지구 :  6개지구 /  4.31㎞ / 13,417백만원

(뒤하천, 율치천, 율정천, 아곡천, 신동천, 장교천)

-‘19년사업 : 3개지구 / 3,104백만원〔국비 1,552 (50%), 시비 1,552 (50%)〕

◦ 위    치 : 수지면 고평천 외 2개소

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2022년(7개년)

구분	지구별	위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
				계	기투자	2019	2020이후
합 계		5개 하천	8.2	19,046	3,012	4,104	11,930	16
보조	소계	3개 하천	7.35	17,046	3,012	3,104	10,930	17
	고평천	수지 고평	2.3	7,745	2,692	2,332	2,721	35	‘16~‘19
	당동천	아영 봉대	3.4	7,401	320	400	6,681	4	‘18~‘22
	오롱골천	운봉 주촌	1.65	1,900		372	1,528		‘19~‘20
자체	소계	2개 하천	0.85	2,000		1,000	1,000
	천사천	월락동	0.50	1,000		500	500		‘19~‘20
	양선천	덕과 신양	0.35	1,000		500	500		‘19~‘20

□ 추진실적

◦ 고평천 □ 1·2차분 준공	: ‘17.  5. 10. ~ ‘18. 4. 23.

□ 3차분 착공 (공정 95%)	: ‘18.  2. 27. ~ ‘18. 12. 30.

◦ 당동천 □ 실시설계 용역 착수	: ‘18.  2. 21. ~ ‘19.  4. 30.

□  주민설명회 개최 완료	: ‘18.  6. 19.

◦ 오롱골천 확정 및 2019년 사업계획서 제출	: ‘18.  9. 19.

□ 금후계획

◦ 고평천    - 4차분 공사 추진	: ‘19.  3월 ~ 12월

◦ 당동천   □ 사전설계검토 심의(행정안전부)	: ‘18. 12월

□  편입용지 보상 및 공사 추진	: ‘19.  1월 ~ 12월

◦ 오롱골천 □ 실시설계 용역 추진	: ‘19.  1월 ~  6월

□  편입용지 보상 및 공사 추진	: ‘19.  7월 ~ 12월

◦ 천사천,양선천 □ 실시설계 용역 추진	: ‘19.  1월 ~  6월

□  편입용지 보상 및 공사 추진	: ‘19.  7월 ~ 12월

요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성

<요천 수변 관광 자원화 사업>

□ 개    요

◦ 위    치 : 쌍교동 요천 지내 / 국가하천

◦ 사 업 량 : 물놀이 분수광장

- 음악분수 L=45.0m, 바닥분수(2) 및 광장, 물놀이시설 A=680㎡ 정도

◦ 총공사비 : 9,000백만원(시비)  -‘18년 사업비 : 3,500백만원

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2020년(4개년)

□ 추진실적

◦ 요천 내 수경시설설치 추진계획 보고(시장)	: ‘17. 6. 28.

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진	: ‘17. 10. ~ ‘18. 12.

◦ 용역 중간 보고회 개최	: ‘18.  8.  3.

◦ 수경시설 추진 쟁점사항 보고(시장)	: ‘18.  9. 25.

◦ 간부회의 현안토론 개최	: ‘18. 10. 15.

- 요천 내 수경시설(분수) 추진사항 및 쟁점사항 보고(자연재해, 유지관리 문제점)

◦ 의회(행정사무감사) 추진사항 보고	: ‘18. 11. 19.

◦ 사업계획 변경 추진보고	: ‘18. 11. 23.

※ 당초 : 수경시설(분수) / 중앙저수로 ⇨ 변경 : 물놀이 분수광장 / 고수부지

□ 쟁점 및 대책

◦ 시의회 행정사무감사 보고(`18.11.19) 시 국비확보 방안 검토 의견 제시와 실시설계 시 체험형 물놀이장 시설공간 확대 배치 요구

□ 국비확보를 위한 타부처 공모사업 공동대응 추진(관광과 ⇨ 문체부 관광        개발사업 공모 등)

□ 타지역 선진사례 벤치마킹 및 전문가 자문 등으로 타지역과 차별화된 체험형        물놀이장(공간 확대 배치) 조성

□ 금후계획

◦ 국비확보를 위한 연계사업 검토협의(시 관광과) : ‘18. 12. ~ ‘19. 2.

◦ 수경시설 설치 하천점용 협의(익산청)           : ‘19.  1.

◦ 사업 추진(춘향제 이후)	: ‘19.  6. ~ ‘20. 4.

하천 유지관리사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 소하천‧지방하천‧국가하천 일원

◦ 사 업 량 : 3개사업 / L =79.3km

◦ 사 업 비 : 2,376백만원 (국비 920, 도비 48, 시비 1,408)

◦ 사업기간 : 2019년

구 분	사업내용	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
합 계	3개 사업	79.3	2,376
하천 유지관리사업	하천 유지관리	15.0	520
	하천 하도준설	20.0	400
	주민참여예산	3.1	440
기성제 유지관리사업	지방하천 기성제 정비	2.3	96
국가하천 유지보수사업	국가하천 섬진강, 요천 유지관리	섬진강 21.0 요 천 17.9	920

□ 추진실적

【 하천 및 기성제 유지관리사업 】

◦ 하천유지관리 사업 추진	: ‘18. 1. 26. ~ 12. 10.

- 유지관리 완료 / 이백면 백암천외 15개소, L= 0.96km	: ‘18. 4.  3. ~ 12. 10.

- 하도준설 완료 / 수지면 신평천외 33개소, L=13km	: ‘18. 1. 25. ~ 11. 21.

【 국가하천 유지보수사업 】

◦ 요천 산책로 정비사업 외 17건 공사 완료	: ‘18. 4.  4. ~ 12.  1.

□ 금후계획

【 하천 및 기성제 유지관리사업 】

◦ 하천유지관리사업 대상지구 읍면동 조사 제출	: ‘19. 1. ~ ‘19.  2.

◦ 하천유지관리사업 추진	: ‘19. 1. ~ ‘19. 12.

【 국가하천 유지보수사업 】

◦ 사업지구 현지조사 및 사업 추진	: ‘19. 1. ~ ‘19. 12.