2019. 1.

2019년 주요업무 계획

환경사업소

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2018년 주요업무 결산

□ 2019년 중점 추진방향

□ 2019년 주요업무 계획

◦ 강우시 하수관리 시범사업

◦ 노후하수관로 정비사업

◦ 남원[3단계] 하수관로 정비사업

◦ 소규모 마을하수처리시설 설치 및 개량사업

◦ 하수슬러지 처리시설 관리대행 추진

◦ 소규모 마을하수처리시설 기능개선 및 완벽한 생활하수 관리

◦ 요천생태습지공원 사랑받는 공원 조성

◦ 달궁·반선 소규모 마을하수처리시설 미세목 자동스크린 설치

◦ 운봉·인월 및 소규모 마을하수처리시설 운영위탁

◦ 소규모 마을하수처리시설 개량사업

일  반  현  황

□ 기    구

									환경사업소장
									강 인 식
하수경영담당					하수시설담당								하수처리담당										마을하수담당
유 홍 규													양 병 우										문 하 성
∘행정종합계획수립 ∘회계․시설물 관리 ∘공기업 특별회계 운영 ∘생태습지공원 관리					∘하수도 중장기계획 수립 및 추진 ∘하수관거정비, 마을하수도 사업 시행 및 유지관리								∘남원하수처리장 운영 ∘분뇨처리시설 운영 ∘하수슬러지 처리시설 관리·감독										∘운봉․인월하수 처리장 운영 관리 ∘소규모하수처리시설 운영 관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	26	1	4	5	8	8
현 원	23	1	6	6	7	3	청 경 1 환경관리원 2 공 무 직 3
증 감	△3	-	2	1	△1	△5

남원시 하수도 공기업 관리현황

□ 하수처리시설 현황

□ 처리장 시설수 : 64개소

□ 처리용량      : 55,943㎥/일

□ 시설별 현황                                      (2018.11월말 기준)

시 설 명	위 치	시설용량(㎥/일)	비 고
계	64개소	55,943
남 원 하수처리장	주생면 요천로 1036-207	50,000
운 봉 하수처리장	운봉읍 황산로 1181-13	800
인 월 하수처리장	인월면 천왕봉로 214	1,000
소규모 하수처리장	읍․면지역 분포	4,143	61개소

□ 요천생태습지공원 현황

위 치	조성규모	준공일자	주요시설
주생면 중동리 1275	145,298㎡	2014.12.01.	생태탐방로,야구장,다목적구장,애견놀이터,모정 등

□ 하수관로 현황                            (2018.11월말 기준)

구 분	계획연장 (㎞)	시설연장(㎞)			보급률 (%)
		계	합류식	분류식
2018년	565.3	473.9	86.6	387.3	83.8
2017년	565.3	460.6	86.6	374.0	81.5

□ 하수처리 현황                                              (2018.11월말 기준)

총인구 (명)	하수처리인구 (명)	보급률 (%)	시설용량 (㎥/일)	하수발생량 (㎥/일평균)	하수처리량 (㎥/일평균)	하수처리율 (%)
83,281	67,140	80.6	55,943	50,753	47,737	94

□ 하수도 요금 현황                           (2017년 결산기준)

하수부과량 (천톤)	하수수익 (백만원)	총괄원가 (원/㎥)	하수도요금 (원/㎥)	현실화율 (%)	비 고
6,128	2,841	3,490.45	463.68	13.28

□ 2019년 예산규모 : 27,684백만원

2019 예산

(단위 : 백만원)

구 분	2019년	2018년	증감(%)
합 계	27,684	33,997	△6,313
일반회계	459	847	△388
특별회계	27,225	33,150	△5,925

▷ 2019년 특별회계 : 27,225백만원

세   입

(단위 : 백만원)

구 분		2019년	2018년	증감(%)
합 계		27,225	33,150	△5,925
자체수입		3,922	3,836	86
의존수입	국비	11,103	17,264	△6,161
	지원금	12,200	12,050	150

세   출

(단위 : 백만원)

구 분		2019년	2018년	증감(%)
합 계		27,225	33,150	5,925
사업비	소계	21,897	28,393	△6,496
	투자사업	19,675	26,551	△6,876
	경상사업	2,222	1,842	380
비사업	소계	5,328	4,757	571
	행정운영	5,232	4,625	607
	예 비 비	96	132	△36

2018년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 2017년 지방공기업 경영평가 결과 4년 연속 우수기관 선정 ◦ 노후 하수도 선진화를 위한 관로정비 및 소규모 하수처리시설 개량사업 국비반영

□ 2018년 지방공기업 경영평가 결과 우수기관 선정

◦ 평가결과 2018년도 88.12점(2017년도 87.54점) / 전라북도 2위

- 평점[리더십/전략 100, 경영시스템 89.08, 경영성과 84.06, 사회적가치 97.22 정책준수 81.00]

□ 하수도시설 지속적인 확충 및 유지관리

◦ 강우시 하수관로 시범사업 추진

- 하수관로(차집관로정비, 2단계 하수관로 정비)정비사업 설계완료 및 착공

◦ 소규모 마을하수처리시설 설치사업 추진

- 월산지구 : 완공, 호곡지구 : 공정률 98%

- 용전지구 : 공정률 35% , 서도지구 : 설계완료

□ 하수처리 노후시설물 개선 및 최적운영으로 청정하천 수질보전

◦ 남원·운봉·인월 하수처리시설 방류수 수질기준 준수

구 분	BOD(5㎎/L)	SS(10㎎/L)	T-N(20㎎/L)	T-P(0.3㎎/L)	비고
남원처리장	1.8	3.5	10.7	0.084
운봉처리장	1.5	3.4	6.190	0.039
인월처리장	1.5	3.7	5.447	0.035

◦ 소규모 마을하수처리시설 방류수 수질기준 초과 최소화

- 61개소 중 2015년 13개소 / 2016년 1개소 / 2017년 2개소 / 2018년 6개소

□ 요천생태습지공원 시민 친수공간 조성

◦ 방범용 CCTV설치, 다목적구장·야구장 시설보강, 애견놀이터설치공사 등

	아쉬운 점
◦ 소규모 마을하수처리시설 노후 및 개소수 증가에 따라 운영관리 인력 부족 등으로 수질기준 준수 어려움 → 소규모 마을하수처리시설 민간 전문업체 관리대행 추진

2019년 중점 추진방향

안정적인 생활하수처리 및 공기업 운영효율 향상

5대 전략		10대 과제
시정 기획․조정 기능 강화		① 하수도시설 지속적인 확충 및 유지관리 - 인구기준 하수도 보급률 2020년 91% 보급 (남원시하수도기본계획 : 2011년, 2017.2월 변경) ② 완벽한 생활하수처리(방류수수질기준준수/64개소)
미래지향 정책개발		③ 강우시에도 안정된 하수수집·이송·처리능력 확보 및 소규모 마을하수처리시설 안적적 운영·관리 ④ 사랑받는 요천생태공원 조성 및 관리
일하는 조직문화 성과주의 정착		⑤ 지방공기업(하수도) 경영평가를 통한 효율적인 운영 ⑥ 안전하고 쾌적한 근무환경 조성으로 생기있고 내실있는 조직문화 구축
효율적인 예산운영 재정건전성 확대		⑦ 투명하고 효율적인 공기업특별회계 운영 및 공개 - 하수처리시설별 운영관리지침 및 이력관리 ⑧ 자산입력단위 세분화하여 자산관리 전산화 - 2014년 자산 재물조사 및 실사후 전산관리
신뢰의 법무행정 정확한 통계관리		⑨ 법령과 지침 등 매년 개정된 내용숙지 및 연찬 ⑩ 생활하수 처리실태 자료관리 및 홍보

2019년 주요업무 계획

강우시 하수관리 시범사업

□ 개    요

구 분		차집관로 정비사업		남원(2단계) 하수관로 정비사업
위 치		➢ 남원시 일원 (8개하천)		➢ 남원시 일원 (6개지역)
사 업 량		➢ 차집관로 정비 L=31km		➢ 하수관로 정비 L=57km ➢ 배수설비 2,900여 가구
총사업비		➢ 42,000백만원(국29,400, 시12,600) ➢‘19년 : 6,725백만원		➢ 28,000백만원(국19,600, 시8,400) ➢‘19년 : 1,062백만원
사업기간		➢ 2015~2020(6개년)		➢ 2015~2020(6개년)

□ 추진실적

◦ 시범사업 대상 선정	: 2015. 02.

◦ 한국환경공단 위·수탁 협약 체결	: 2015. 03.

◦ 용역 발주	: 2015. 06.

◦ 기본설계 완료에 따른 VE검토 추진	: 2016. 05.

◦ 하수도정비기본계획(변경) 수립	: 2016. 05. ~ 07.

◦ 실시설계 추진	: 2017. 08. ~ 2018. 08.

◦ 공사착공	: 2018. 10.

□ 금후계획

◦ 공사추진	: 2020. 12월 까지

노후하수관로 정비사업

◦ 노후하수관로 정밀진단(2016.04) 결과에 따른 정비로 도로함몰 등 안전사고에 선제적 대응

◦ 1993년 조성된 도통1택지는 당시 기 분류식화 되었으나 오접과 노후화로

금회 배수설비 정비계획 수립

◦ 동 시기에 수행하고 있는 「강우시 하수도정비 시범사업」과의 사업 경계를 명확히 구분하여 중복투자 방지

□ 개    요

◦ 사업위치 : 남원시 일원(죽항동, 왕정동, 향교동 일원)

◦ 사업내용 : 노후하수관로 정비 L=5.6km, 배수설비 300여 가구

◦ 사 업 비 : 9,785백만원(국비 6,117, 시비 3,668)

※ 2019년 사업비 : 5,286백만원(국비 2,393, 시비 2,893)-배수설비 시비 500 포함

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2020년 (4개년)

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: 2017. 02. ~ 2017. 11.

◦ 환경부 재원협의 등 행정절차 이행	: 2018. 05. ~ 2018. 12.

□ 금후계획

◦ 재원협의 완료	: 2019. 01월 까지

◦ 공사추진	: 2019. 02. ~ 2020. 12.

남원[3단계] 하수관로 정비사업

◦ 하수량 과다발생 예방을 위하여 시가지 강우시 합류식 지역 및 운봉권 처리구역 내에서 이송되는 불명수 유입 방지 등 하수처리 운영비용 절감과 노후하수관로 정비 병행시행으로 안전한 하수시설을 확보하기 위함

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원처리구역 및 운봉처리구역

◦ 사업내용

- 남원처리구역 : 오수관로 설치 L=31.7km, 배수설비 2,281가구

- 운봉처리구역 : 오수관로 설치 및 개량 L=15.2km

◦ 사 업 비 : 27,200백만원(국비 19,040, 시비 8,160)

※ 2019년 사업비 : 2,625백만원(국비 1,838, 시비 787)

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2020년 (4개년)

□ 추진실적

◦ 2018년 신규사업지구로 확정 내시	: 2017. 11.

◦ 기본 및 실시설계 용역시행	: 2017. 11. ~ 2018. 12.

□ 금후계획

◦ 재원협의 및 행정절차 이행	: 2019. 06월 까지

◦ 공사발주 및 착공	: 2019. 07.

◦ 공사추진	: 2020. 12월 까지

소규모 마을하수처리시설 설치 및 개량사업

□ 개    요

사 업 명		사업기간	사업량	총사업비
설치사업	계		하수관로 L=15.74km 처리시설 2개소	14,783백만원 (국 10,348 시 4,435)
	용전지구	2016~2020	하수관로 L=11.4km 처리시설 Q=200㎥/일	11,474백만원 (국 8,032 시 3,442)
	서도지구	2017~2020	하수관로 L=4.34km 처리시설 Q=100㎥/일	3,309백만원 (국 2,316 시 993)
개량사업	계		Q=130㎥/일	2,615백만원 (국 680, 시 1,935)
	권포, 와운	2017~2019	권포 Q=50㎥/일 와운 Q=30㎥/일	1,615백만원 (국 380, 시1,235)
	양평	2018~2019	양평 Q=50㎥/일	1,000백만원 (국 300, 시700)

□ 추진실적

<마을하수도 설치사업>

◦ 금지 용전지구 : 기본 및 실시설계 완료/ 공사추진중(공정 35%)

◦ 사매 서도지구 : 기본 및 실시설계 완료/ 환경부 재원협의 완료

<마을하수도 개량사업>

◦ [권포,와운] 개량사업 인가 및 재원협의	: 2018. 09. 14.

◦ [권포,와운] 원가심사(전북도)	: 2018. 11. 08.

◦ [양평] 소규모 하수처리시설 기본․실시설계	: 2018. 03. 08. ~

◦ [양평] 하수관로 CCTV 및 연막조사	: 2018. 10. 10.

□ 금후계획

<마을하수도 설치사업>

◦ 금지 용전지구 – 공사추진	: 2020. 12월 까지

◦ 사매 서도지구 – 공사추진	: 2019. 02. ~ 2020. 12.

<마을하수도 개량사업>

◦ 권포, 와운 처리시설 공사 착수 및 준공	: 2018. 12. ~ 2019. 09.

◦ 양평 처리시설 공법선정 및 재원협의	: 2019. 01. ~ 05.

하수슬러지 처리시설 관리대행 추진

□ 개    요

◦ 사 업 명 : 하수슬러지 처리시설 관리대행

◦ 대행업체 : (유)일토씨엔엠, ㈜티에스케이

◦ 대행기간 : 2015. 07. ~ 2019. 12.(4년 6개월)

◦ 대행비용 : 금1,717백만원/년(2019년도)

◦ 대행내용 : 하수슬러지처리시설 운영, 유지관리 등

□ 추진실적

◦ 2018년 관리대행 성과 평가	: 2018. 08. ~ 10.

<위탁관리 성과>

◦ 가동일수 239일, 평균 하수찌꺼기(탈수케익) 반입량 29.1톤/일

- 시설용량(30톤/일) 대비 97%처리

◦ 탄화된 하수찌꺼기(탄화물) 발생량 570톤/년

- 유기성 고형연료로 한국중부발전 보령화학에 공급되어 재활용(판매단가 10,000원/톤)

□ 금후계획

◦ 운영방안 및 원가산정 용역	: 2019. 10.

◦ 기간만료에 따른 민간대행 의회동의	: 2019. 11.

◦ 사업수행능력 평가 및 업체선정	: 2019. 12.

- 소규모 마을하수처리시설 -

기능개선 및 완벽한 생활하수 관리

□ 개    요

◦ 주요시설 : 소규모 마을하수처리장 61개소

◦ 사 업 비 : 698백만원

◦ 사업기간 : 2019. 01. ~ 2019. 12. (연중)

◦ 사업내용 : 61개소 마을하수처리장 시설물 개선 및 유지관리

□ 추진실적

◦ 소규모하수처리시설 중장기 관리계획 하수도기본계획 반영

- 소규모마을하수처리장 2020년까지 관로연결(14개소)

◦ 섬진강수계 소규모마을하수시설 기술진단실시	: 10개소

- 대    상 : 금지면, 송동면, 대강면

- 진단비용 : 100백만원

- 진단기간 : 2018. 03. 01. ~ 09. 01. (7개월)

◦ 마을하수시설물 유지관리 준설, 미생물 식종 등 시설개선	: 55건

◦ 소규모마을하수시설 진입로 보수 및 법면 보수	: 4개소

□ 금후계획

◦ 마을하수처리시설 운영 및 집중관리(61개소)	: 2019. 01. ~ 12.

◦ 마을하수처리시설 덕동 외 4개소 기술진단 실시	: 2019. 01. ~ 12.

요천생태습지공원 사랑받는 공원 조성

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2019. 02. ~ 12.

◦ 총사업비 : 446백만원

◦ 사업내용 : 생태습지공원 시설 설치·보강 및 운영

- 쉼터(모정, 음수대) 및 대형주차장 조성, 초본류 식재, 사후 모니터링 용역 등

□ 추진실적

◦ 요천생태습지공원 애견놀이터 시설보강공사	: 106백만원

◦ 생태습지공원 수목 식재공사(편백 72주 등)	:  43백만원

◦ 생태습지공원 야구장 화장실 설치공사	:  69백만원

◦ 생태습지공원 사후 모니터링 용역	:   9백만원

◦ 생태습지공원 야구장 조명시설 설치공사	: 500백만원

◦ 잡초제거 및 모정, 벤치 도장 등 시설 보수정비	: 연중

□ 금후계획

◦ 생태습지공원 쉼터 조성공사(모정, 음수대 등)           : 175백만원

◦ 생태습지공원 대형주차장 설치공사	: 100백만원

◦ 생태습지공원 초본류 식재공사	:  50백만원

◦ 접지보강 및 서지보호기 설치공사	:  10백만원

◦ 생태습지공원 야구장 바닥흙 보충공사	:  10백만원

달궁·반선 소규모 마을하수처리시설

미세목 자동스크린 설치

□ 개    요

◦ 필 요 성 : 유입하수 내 협잡물 분리선별을 통한 수질개선 및 법적                    방류수질 준수

◦ 사업기간 : 2019. 01. ~ 09. (9개월)

◦ 총사업비 : 2개소 100백만원(시비) [1개소 50백만원]

◦ 위    치 : 산내면 덕동리 산107-6 외 1개소

‣ 2개소 [달궁, 반선 하수처리시설]

◦ 사업규모 : 미세목 자동 스크린 2식

◦ 사업내용 : 미세목 자동 스크린 신규 설치

□ 추진계획

◦ 실시설계 실시	: 2019. 02.

◦ 업체 선정 및 스크린 설치 착수	: 2019. 05.

◦ 시설 준공	: 2019. 08.

◦ 스크린 시운전	: 2019. 09.

□ 기대효과

◦ 유입하수 내 슬러지를 사전 선별하여 운영효율성 증대

◦ 협잡물 분리선별을 통한 수질개선 및 법적 방류수질 준수

운봉·인월 및 소규모 마을하수처리시설 운영위탁

□ 개    요

◦ 필 요 성

‣ 운영관리 인력 부족 및 잦은 인사이동으로 인한 전문성 저하

‣ 소규모 마을하수처리시설별 처리공법 다양성 분포

‣ 환경기초시설 민간대행 및 위탁관리 전환추세

◦ 위탁일시 : 2019. 11. ~

◦ 시설현황

구 분	개소	처리용량 (㎥/일)	중계펌프장	수질관리	비 고
계	63	5,943	6개소
운봉하수처리장	1	800	2개소	수질자동측정기 (TMS)	2인1조
인월하수처리장	1	1,000	4개소	수질자동측정기 (TMS)
소규모 마을하수처리시설	61	4,143		현장 채수	5인2조

□ 추진계획

◦ 타지자체 소규모마을하수처리시설 운영관리 견학       : 2019. 03.

◦ 하수도시설 민간위탁 타당성 용역비 추경예산 확보	: 2019. 05.

◦ 소규모마을하수도시설 타당성 용역 실시	: 2019. 06. ~ 10.

- 시설운영비 및 단순관리대행, 복합관리대행 방안 등 검토

◦ 위탁업체 선정	: 2019. 11.

□ 기대효과

◦ 소규모 마을하수처리시설의 효율적 및 전문적 운영관리

소규모 마을하수처리시설 개량사업

□ 개    요

시 설 명	사업기간	사 업 량	총사업비	비고
방 촌	2019	Q=60㎥/일	740백만원 (국 114, 시 626)	개량사업

□ 추진계획

◦ 소규모 하수처리시설 기본․실시설계         : 2019. 02. ~ 06.

◦ 하수처리시설 공법선정                    : 2019. 04.

◦ 인가신청 및 재원협의                     : 2019. 06.

◦ 공사착수 및 준공                         : 2019. 07. ~ 12.

□ 기대효과

◦ 처리시설 전면 개량을 통해 방류수질 법정기준 준수 및 처리효율 극대화