2019. 6.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

시정질문·5분발언 추진상황

산림녹지과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2019년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 함파우~소리체험관 테마꽃길 조성사업

◦ 무궁화동산 조성사업

◦ 임도사업

◦ 숲길 조성사업

◦ 산불방지 대책

◦ 보호수 생육개선 및 쉼터 조성사업

◦ 산림병해충 방제

◦ 숲 가꾸기 사업

◦ 도시숲 조성 및 가로수 관리

◦ 산림소득 증대사업

◦ 조림사업

◦ 창조적 마을 만들기

◦ 백두대간 생태교육장 운영

□ 시정질문·5분발언 추진상황

일  반  현  황

□ 기    구

										산림녹지과장
										정 영 주
산림경영담당					산림보호담당						조경시설담당								산림소득담당						백두생태담당
이 승 재					안 길 재						소 민 정								안 도 엽						안 성 순
임도개설 및 관리 숲길(등산로) 정비 임업후계자 선정‧관리 공유재산관리 산지전용허가·협의 자연휴양림관리 국가산림문화자산 지정및관리					산불방지대책추진 산림피해단속·사건 산림병해충방제 보호수지정관리 토석채취 허가․지도 숲가꾸기사업 추진						도시숲 조성·관리 가로수 조성·관리 가로화단조성·관리 요천변 꽃단지 조성 향기원,신생마을 꽃단지 조성·관리								조 림 사 업 추 진 산림소득사업추진 백두대간주민지원 농림사업·농특회계 마을만들기 산촌생태마을관리 산림경영계획인가						백두대간생태교육장 운영 및 관리 ∘전 시 관 ∘체험·휴양시설 ∘생태관광에코롯지 ∘국민여가캠핑장 ∘고원선수촌훈련장

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	21	1	5	4	7	4	17
현 원	21	1	7	6	3	4	17
증 감	-	-	2	2	△4	-	-

※ 비    고 : 17명(임기제 3, 청원경찰 4, 공무직 10)

※ 육아휴직 : 1명(녹지7급) 현원 포함

2019년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 요천변, 향기원 꽃단지, 오감만족 숲 등 사계절 아름다운 녹지공간 조성 - 춘향제 기간 중 행사장 분위기 고조, 시민과 관광객에 포토장소로 각광 ◦ 봄철 산불방지대책 운영으로 산림피해최소화 및 산림자원 보전 - 2. 1 ~ 5. 15, 산림녹지과 및 20개 읍·면·동

□ 효과적인 산림재해 방지로 시민생활 안정 기여

◦ 봄철 산불방지대책본부 운영(2. 1 ~ 5. 15)

- 감시원 및 진화대 배치(119명)                : 산불발생 20건, 4.31ha

※ `18년 : 17건/ 1.08ha, `17년 : 14건/ 1.13ha, `16년 : 11건/ 0.87ha

◦ 산지수해복구사업(1,2차)                   : 13개 지구(사업비 15억원)

◦ 생활권재해우려목 제거사업                 : 269본

◦ 산림병해충 예찰 및 방제                  : 방제단 3명, 연중

- 소나무재선충병 검경 의뢰(산림환경연구소) : 478본(소나무고사목)

□ 지역경제 활성화를 위한 산지 효율적 개발과 경영

◦ 임도사업 : 신설 2개소(보절 괴양~서치, 대산 풍촌) 1.45km/ 387백만원

◦ 숲가꾸기 : 큰나무가꾸기 사업 151ha/ 167백만원

◦ 조림사업 : 경제수조림 등 4개사업 267ha/ 1,435백만원

◦ 시유림(공유재산) 임대 : 29필지 45명(141,325㎡)

◦ 소나무 반출 생산 확인  197건    ◦ 불법 산림사건 처리    33건

◦ 산림경영계획 인가       62건    ◦ 토석채취 허가 및 관리 37개소

◦ 산지전용 : 322건(허가 4, 협의 78, 신고 15, 변경협의 97, 복구설계승인 51, 복구준공 57)

□ 녹색도시를 위한 그린 경관 조성

◦ 오감만족숲~함파우 테마꽃길 조성 : 나무수국, 산수국, 가우라 등 5종/167백만원

◦ 무궁화동산 조성 : 덕과 사율 3·1운동 기념탑 주변/무궁화, 꽃잔디 등6종/100백만원

◦ 도시숲 조성 및 가로수 관리 : 시도1호선 등 25개소, 소나무 등 10종/647백만원

◦ 요천변, 향기원, 신생마을 꽃단지 조성(48,554㎡) : 튜울립, 페츄니아, 산파체스 등 5종

◦ 명상숲(학교숲) 조성 : 국악예술고등학교/59백만원

□ 산림소득창출을 위한 경쟁력 제고 및 여건 조성

◦ 백두대간주민소득지원사업 : 저온저장고·정제기 등 15개소/188백만원

◦ 산림소득증대사업        : 임산물상품화사업 등 6개사업/740백만원

◦ 마을만들기 사업         : 주천 내송, 산내 내령·와운 등 5개 마을/2,500백만원

□ 백두대간 생태교육장 운영

【전 시 관】(’19. 5. 19. 기준)

◦ 운영실적 : 방문객 28,085명(무료 20,238, 유료 7,847) / 수입 21백만원

◦ 겨울방학 특별전 : ’18.12.29 ~ ’19.2.6 / 21,189명 / 14백만원

◦ 전시관 주차장 조성(35면/220백만원)

◦ 생물테마 전시․체험시설 조성(환경과 추진) : ’18.11월~’19.12월 / 15억

【체험휴양시설】

◦ 운영실적 : 방문객 6,494명/ 수입 10백만원

【에코롯지·캠핑장】

◦ 운영실적 : 방문객 3,968명/ 수입 49백만원

	하반기 추진방향
◦ 창조적 마을만들기 사업 추진으로 산촌마을 주민 여건 개선 및 경쟁력 제고와 살고싶은 마을 조성 ◦ 소득지원사업 적극 추진으로 산림산업 경쟁력 강화 ◦ 여름방학 특별전 운영, 물놀이장 개장, 전시관 체험시설 개선을 통한 백두대간생태교육장 활성화 ◦ 숲가꾸기, 조림사업을 통한 산림자원의 경제·사회적 가치제고

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

함파우~소리체험관 테마꽃길 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 오감만족숲~소리체험관, 관광지~김병종미술관~함파우마을    ◦ 사업규모 : L = 1㎞ / 화관목류, 초화류

◦ 사 업 비 : 200백만원(특별교부세)

◦ 사업기간 : 1 ~ 10월

◦ 사업내용 : 목수국·산수국 5,000주, 가우라 40,000본, 남천 300주, 홍가시 700주

□ 추진실적

◦ 전문가 자문(국립수목원, 화훼전문가)          :  1. 23.

◦ 실시설계 용역                               :  3. 21. ~ 4. 9.

◦ 사업시행                                    :  4. 30. ~ 5. 24.

□ 쟁점 및 대책

◦ 당초 법면부 꽃 경관 조성 계획이었으나 법면 보호망 피복되어 조성 불가

□ 도로변 갓길 수림대 하층 군락지 꽃 경관 조성

□ 금후계획

◦ 급수, 시비, 제초 등 사후관리 철저

무궁화동산 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 덕과면 사율길 283 일원(3·1운동 기념탑)

◦ 사업규모 : 8,467㎡

◦ 총사업비 : 100백만원(국비 50, 도비 15, 시비 35)

◦ 사업기간 : 1 ~ 10월

◦ 사업내용 : 조경공(무궁화 외4종 678주, 꽃잔디 2,160본), 토공, 배수공,                  포장공, 시설물(팔각정자) 1식

□ 추진실적

◦ 현지조사 및 실시설계 용역                 : 2. 26. ~ 4. 2.

◦ 사업시행                                  : 4. 17. ~ 5. 15.

□ 쟁점 및 대책

◦ 3·1운동 기념탑 진입로(율천교~3·1운동기념탑) 가로수에 대한 정비 필요

□ 수목 보식, 식재간격 조정, 가지치기 등 수형조절 시행

□ 금후계획

◦ 유지관리(병해충방제, 가지치기)             : 6 ~ 10월

◦ 가로수 보식 사업 시행                     : 10월

임 도 사 업

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내일원

◦ 사 업 량 : 43.5㎞

◦ 사 업 비 : 849백만원(균특 552, 시비 297)

◦ 사업내용 : 간선 1.0km, 작업 1.5km, 구조개량 4km, 보수 7km, 지장목제거 30km

임도관리원(2명)

※ 기존임도 : 33개 노선 116.414㎞

□ 추진실적

◦ 간선임도 실시설계 완료  : 2. 27. / 12백만원

◦ 신    설 : 1.45km/402백만원

·간선 - 보절 괴양~서치 0.72km(공정율 40%) : 3. 26. ~ 9. 16. / 205백만원

·작업 - 대산 풍촌 0.73km / 182백만원(설계심사 중)

◦ 구조개량 : 대산 신계, 인월 자래 등 8개소 4km / 실시설계 중

□ 금후계획

◦‘19년도 신설임도 사업시행(대산 풍촌)	: 6 ~ 10월

◦ 구조개량 8개소 사업시행	: 6 ~ 7월

◦ 임도변 풀베기 등 유지 보수	: 6 ~ 10월

◦ 임도관리원 활용 유지관리	: 6 ~ 10월

◦‘20년도 임도신설 사전설계	: 11월

숲길 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 서룡산, 덕두산, 만행산~귀정사, 교룡산, 기린봉, 원통산 등 7개소

◦ 사 업 량 : 17.43㎞

◦ 사 업 비 : 452백만원(균특 100, 시비 352)

◦ 사업내용

- 안전시설 및 보수정비(11.3km) : 서룡산, 덕두산, 만행산~귀정사, 기린봉,                                      원통산, 고산봉

- 주민참여예산 : 운봉 허브밸리 바래봉 탐방로 데크설치, 고리봉(대강)                       등산로 정비, 교룡산 둘레길 정비 및 체련시설 설치 등

- 태극종주 등산 안내도(인월) 설치

※ 기 개설 : 253km(등산로 138km, 백두대간 71km, 둘레길 44km)

□ 추진실적

◦ 등산로(숲길) 정비사업 실시설계 완료 : 4. 17. / 14백만원

◦ 서룡산, 덕두산, 만행산~귀정사, 기린봉, 원통산, 고산봉 등산로 정비(공정률 10%)

: 5. 14. ~ 8. 11. / 142백만원

◦ 주민참여예산 - 교룡산 둘레길 정비 및 체련시설 설치(공정률 10%)

: 5. 14. ~ 8. 11. / 48백만원

◦ 예산 재배정 – 인월면 : 태극종주 등산 안내도/ 15백만원

- 대강면 : 고리봉 등산로 정비/ 20백만원

□ 금후계획

◦ 등산로 이정표 및 안내판 정비                   : 6 ~ 8월

◦ 운봉 허브밸리 바래봉 탐방로 데크설치           : 6 ~ 8월

◦ 등산로변 풀베기 시행(2회)                       : 6 ~ 9월

◦ 등산로변 도복목 제거 등 수시 민원 처리         : 연중

산불방지 대책

□ 개    요

◦ 임야면적 : 46,910ha(시 면적의 62.4%)

◦ 사 업 비 : 1,629백만원(국비 282, 도비 223, 시비 1,124)

◦ 기    간 : 봄철(2. 1. ~ 5. 15.), 가을철(11. 1. ~ 12. 15.)

◦ 진화장비 : 산불진화차, 수송차, 무선국 등 16종 3,826점

□ 추진실적

◦ 봄철 산불방지 대책본부 운영(21개소)     : 2. 1. ~ 5. 15.

- 산불전문예방진화대 및 산불감시원 배치[119명(진화대 26명, 감시원 93명)]

- 산불위험요인 사전제거(2.1.~3.31. / 89ha)

- 전라북도 임차헬기 배치(1대 / 월락배수지)

- 입산통제구역 지정 및 등산로 폐쇄(7개소 5,801ha / 7개 노선 24km)

※ 설명절, 정월대보름, 대형산불 위험기간, 청명·한식 등 특별대책 수립 시행

◦ 산불소화시설 점검용역(1개소)            : 2. 1. ~ 11. 30.(12회)

◦ 봄철 산불발생현황 : 20건 / 4.31ha

- 원인별 : 논밭두렁 소각 9건 / 농산폐기물 태우기 5건 / 기타 6건

- 월  별 : 1월 2건 / 2월 2건 / 3월 10건 / 4월 4건 / 5월 2건

□ 쟁점 및 대책

◦ 논·밭두렁 및 농·임업 부산물 소각이 산불발생의 주요 원인

□ 가을철 산불전문예방진화대 활용 읍면동별 공동소각 실시 및 이장회의,        영농교육 등을 통한 소각금지 홍보 실시

□ 금후계획

◦ 가을철 산불방지 대책본부 운영              : 11. 1. ~ 12. 15.

◦ 산불예방·홍보활동                         : 수시

보호수 생육개선 및 쉼터 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내일원

◦ 대 상 목 : 85본(느티 61, 팽나무 4, 소나무 8, 은행 4, 버드 3, 기타 5)

◦ 사 업 비 : 124백만원(도비 7 시비 117)

◦ 사업내용 : 데크시설, 외과수술, 영양주사, 가지치기 등

□ 추진실적

◦ 외과수술 및 쉼터 조성사업 실시설계용역 : 3. 21. / 5백만원

◦ 외과수술사업 - 주생 지당                : 4. 2. / 8백만원

- 산동 월석                : 4. 29. / 9백만원

◦ 쉼터 조성사업(대강 입암)                 : 5. 17. / 42백만원

◦ 생육개선사업(한우물)                     : 5. 20. / 9백만원

□ 쟁점 및 대책

◦ 보호수 생육개선, 쉼터조성 등 사업 후 지속적인 관리 중요

□ 보호수 병해충, 사업 후 현장점검 등 모니터링을 실시하여 한시적

사업이 아닌 지속적으로 관리 추진

□ 금후계획

◦ 쉼터 조성사업(광치동)                      :  5 ~ 6월

◦ 외과수술사업(산동 식련)                     :  5 ~ 6월

◦ 병해충, 사업 후 현장점검 등 모니터링         :  연중

산림병해충 방제

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내일원

◦ 사 업 량 : 81ha

◦ 사 업 비 : 287백만원(국비 42, 도비 18, 시비 227)

◦ 사업내용 : 산림병해충 방제 및 예방 활동(소나무 재선충, 갈색날개              매미충, 미국선녀벌레, 꽃매미 등)

□ 추진실적

◦ 소나무 재선충병 예방나무주사 사업 : 2. 18. ~ 3. 9.

- 762본(마을숲 5개소 및 시내권, 솔백신 4,349병 주입) / 191백만원

◦ 소나무 재선충병 시료채취 및 검경의뢰 / 소나무류 생산확인표 발급

- 시료채취 및 검경의뢰 478건 / 생산확인표 197건 발급

◦ 산림병해충 예찰방제단 운영(3명) : 2. 1. ~

- 소나무 재선충병 시료채취 및 고사목제거, 산림병해충 방제 등

◦ 생활권 수목진료 민간컨설팅 시행 : 2. 12. ~ 10. 31.(32회)

□ 쟁점 및 대책

◦ 임실, 순창, 구례, 함양 등 남원 연접 지역 소나무 재선충병 발생

□ 예찰 강화 및 예방나무주사 사업으로 소나무 재선충병 청정지역 유지

□ 금후계획

◦ 산림병해충 방제단 운영                           :  ~ 11월

◦ 산림병해충 지상방제(갈색날개매미충 외 4종)        : 5 ~ 8월

◦ 해충퇴치기 20대 설치(향기원, 덕음산오감만족숲)      : 5 ~ 6월

◦ 생활권 수목진료 민간컨설팅(32회)                   :  ~ 10월

◦ 예찰활동 및 소나무재선충병 시료 검경 의뢰           : 연중

숲 가꾸기 사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내일원

◦ 사 업 량 : 890ha

◦ 사 업 비 : 1,393백만원(국비 697, 도비 209, 시비 487)

◦ 사업기간 : 1 ~ 12월

◦ 사업내용

- 조림지가꾸기(조림 후 3년까지)    : 640ha / 980백만원

- 어린나무가꾸기(조림 후 5년~10년) : 100ha / 153백만원

- 큰나무가꾸기(조림 후15년부터)    : 150ha / 260백만원

□ 추진실적

◦ 큰나무가꾸기(1차) 사업완료 : 2. 25. ~ 5. 5.

- 사매 등 8개 면․동 110ha / 161백만원 / 피해목·고사목제거 등

◦ 어린나무가꾸기사업 추진 : 5. 15. ~ 6. 23.(공정률 10%)

- 운봉 등 14개 읍․면 100ha / 196백만원 / 가지치기, 병든나무 제거 등

□ 금후계획

◦ 숲가꾸기 사업 시행

- 조림지풀베기(1차) 200ha / 277백만원               : 6 ~ 7월

- 조림지풀베기(2차) 94.38ha / 157백만원             : 6 ~ 7월

- 조림지풀베기(3차) 200ha / 280백만원              : 8 ~ 9월

- 조림지풀베기(4차)  95ha / 157백만원              : 8 ~ 9월

- 큰나무가꾸기(2차) 100ha / 160백만원              : 8 ~ 11월

◦ 2020년 사업 사전설계 50ha / 5백만원               : 12월

도시숲 조성 및 가로수 관리

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 유휴지, 자투리땅, 시유림 / 읍면동 가로수 전체

◦ 사업규모 : 도시숲 1.0㏊, 가로수 조성 2㎞, 가로수 관리 335㎞(50,283주)    ◦ 사 업 비 : 1,376백만원(균특 600, 시비 776)

◦ 사업기간 : 1 ~ 12월

□ 추진실적

◦ 도시숲 조성

위치	사업내용	사업비	비고
오감만족숲 내	홍가시나무 외 5종 63,800주	76백만원
입구광장 주변	산철쭉 외 2종 17,117주	96백만원
오감만족숲 ~소리체험관 일원	가우라 47,000본, 꽃무릇 95,000본	140백만원
요천 100리숲길 (용투산 지구, 국도유지옆)	황매화 8,820주, 덩굴장미 2,000주	87백만원

◦ 가로수 조성·관리

구분	위치	사업내용	사업비	비고
조성	대산면 북남원로	배롱나무 215주	76백만원
	덕과 북부순환도로	이팝나무 80주, 배롱나무 80주(보식)	50백만원
	아백로(지리산IC~아영초교)	왕벚나무 487주, 은행나무 123주 이식	178백만원	공사중지중
관리	요천로, 산성길, 시가지 녹지대	은행, 소나무 전정 468주 예초, 철쭉 전정 104,925㎡ 소나무 병해충 방제 696주	122백만원

□ 쟁점 및 대책

◦ 아영면 아백로 대형은행나무 굴취에 따른 도로 파손 예상과 왕벚나무       다량 수급 어려움으로 공사 중지

□ 수목식재 부적기 도래로 가을철로 사업 연기 및 도로 재포장 예산 추경 확보

□ 금후계획

◦ 추기 가로수 조성사업 시행                : 9 ~ 11월

◦ 시가지 노선별 가로수 보식 시행           : 10월

◦ 가로수 관리(병충해방제, 전지, 풀베기 등)   : 연중

산림소득 증대사업

□ 개    요

◦ 사업대상 : 임업인 또는 생산자단체

◦ 사 업 량 : 임산물생산기반조성 등 7개사업

◦ 사 업 비 : 1,730백만원(보조928, 자부담 802)

◦ 사업기간 : 1 ~ 12월

□ 추진실적

(단위 : 백만원)

사 업 명		사 업 비			내 용
		예산액	집행액	잔액
계		928	421	507	75개소
산림작물 생산기반조성	생산기반조성	133	20	113	1개소 (냉난방시설)
	친환경임산물	210	87	123	20개소(혼합유박, 퇴비, 토양개량제)
	생산단지조성 (소액)	177	92	85	11개소(표고원목, 표고톱밥배지 구입)
임산물유통 구조개선	임산물상품화	130	99	31	19개소(포장박스, 디자인개발)
	유통기반조성	74	32	42	7개소(저온저장고, 화물차량 등)
백두대간주민소득지원사업	백두대간 주민소득	188	85	103	15개소(저온저장고, 정제기, 관정 등)
목재펠릿 보일러보급	목재펠릿 보일러	16	6	10	2개소(주택용)

□ 금후계획

◦ 보조사업 추가 대상자선정 및 사업시행              : 7 ~ 12월

◦ 완료사업 보조금 지급 및 사후관리 철저           : 7 ~ 12월

조 림 사 업

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내일원

◦ 사 업 량 : 267ha

- 경제림 조성 : 120ha

- 큰나무 조림 :  81ha(산림재해방지림 15, 편백피해지조림 66)

- 미세먼지저감조림 : 50ha(큰나무 40, 작은나무 10)

- 풍경있는 농산촌 가꾸기 : 16ha

◦ 사 업 비 : 1,435백만원(국비 593, 도비 253, 시비 589)

□ 추진실적

◦ 봄철 조림사업 시행 : 3 ~ 6월                        (단위 : 백만원)

사 업 명		사업량 (ha)		사업비			식재 수종	비고
		계획	실적	예산액	집행액	잔액
계		267	230	1,435	842	593
경제림 조 성	경제림	120	120	478	471	7	편백, 상수리, 백합	완료
큰나무 조 림	재해방지림	15	15	99	85	14	편백, 소나무	〃
	편백피해 조림	66	66	201	201		편백, 소나무, 백합	〃
미세먼지저감조림	큰나무	40	10	375	57	318	편백	봄철 완료 (가을 30ha)
	작은나무	10	3	90	20	70	편백	봄철 완료 (가을 7ha)
풍경있는 농산촌 가꾸기	주천하주	16	16	192	8	184	공작단풍, 배롱, 명자	추진 중

□ 금후계획

◦ 조림지 활착상황 조사                            :  7 ~  8월

◦ 가을철 조림사업 시행                            :  9 ~ 10월

- 37ha / 미세먼지 저감조림(큰나무 30, 작은나무 7)

창조적 마을 만들기

□ 개    요

◦ 마을 만들기 : 5개소

- 공동문화복지 : 주천 내송

- 환경경관생태 : 산내 내령, 와운

- 산림휴양치유마을 : 주천 노치, 산내 달궁

◦ 총사업비 : 2,500백만원(균특 1,750, 시비 750)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2020년

◦ 사업내용 : 마을회관 리모델링, 생태공원조성, 쓰레기분리수거함 설치,                  산책로 정비 등

□ 추진실적

◦ 내령 창조적 마을 만들기(1차분) 준공                : 3월

◦ 내송 창조적 마을 만들기 준공                      : 5월

◦ 내령 창조적 마을 만들기(2차분) 착공(공정율 20%)    : 5월

◦ 주천 노치 산림휴양 치유마을 실시설계 용역 시행              : 5월

□ 금후계획

◦ 와운 창조적 마을 만들기(1차분) 준공           : 6월

◦ 와운 창조적 마을 만들기(2차분) 시행                 : 6 ~ 9월

◦ 달궁 산림휴양치유마을 만들기 기본 및 실시설계       : 6 ~ 12월

◦ 노치 산림휴양치유마을 만들기 사업시행               : `19. 9. ~ `20. 6.

◦ 내령 창조적 마을 만들기(2차분) 준공           : 12월

◦ 관리감독 철저 및 적기 사업완료

백두대간 생태교육장 운영

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍 운봉로 151일원 / 행정공안길 299일원

◦ 면    적 : 전시관(에코롯지·캠핑장) 78,028㎡/ 체험휴양시설 210,545㎡

◦ 사 업 비 : 1,609백만원(전시관 1,303, 체험휴양시설  132, 에코롯지 133, 캠핑장 41)

◦ 사업내용 : 전시관 및 체험휴양시설, 에코롯지 및 캠핑장 운영, 여름· 겨울방학 특별전 개최, 물놀이장 운영 등

□ 추진실적 (※`19. 5. 19. 기준)

【전 시 관】

◦ 운영실적 : 방문객 28,085명(무료 20,238, 유료 7,847) / 수입금 21백만원

◦ 겨울방학 특별전운영(’18.12.29 ~ ’19.2.6) / 21,189명 / 14백만원

◦ 사진전 개최(노치마을, 백두대간) : ’19. 3월~ 계속 ※특별전 기간 제외

◦ 전시관앞 주차장 조성(’19.4.30) : 35면 / 220백만원

◦ 생물테마 전시·체험시설(*환경과 추진) : ’18. 11 ~ ’19. 12월 / 15억

【체험휴양시설】

◦ 운영실적 : 6,494명/ 99동/ 수입금 10백만원

【에코롯지·캠핑장】

◦ 에코롯지 : 680명/ 170실/ 24백만원

◦ 캠 핑 장 : 3,288명/ 822면/ 25백만원

□ 금후계획

◦ 백두대간 전시관「여름방학 특별전」개최	: 7 ~  8월

※ 사단법인 남원 CYA 주관 독도 전시회 병행 개최	: 8.19~8.31(13일간)

◦ 백두대간 생태교육장 물놀이장 운영	: 7 ~  9월

◦ 백두대간 전시관 체험시설 개선사업 추진	: 7 ~ 12월

◦ 트리하우스, 에코롯지, 캠핑장 운영 및 관리	: 계속

□ 시정질문 추진상황

질문일자 : 2018. 9. 12. (제225회)		질문의원 : 김종관 의원
질문내용	흥부골 자연휴양림 관리 운영의 적정성과 대안
◦ 흥부골 자연휴양림의 활성화 방안
답변내용
◦ 흥부골 자연휴양림 활성화를 위한 방안 마련 검토 중 - 국립 숲체원 유치, 숲속야영장 조성, 민간위탁 등 다양한 대책 강구 중
추진상황
◦ 국립 숲체원 유치 위한 한국산림복지진흥원(대전) 방문 : `19. 4. 15.

□ 5분발언 추진상황

발언일자 : 2018. 10. 8. (제226회)		발언의원 : 염봉섭 의원
발언내용	도시숲 조성 확대
◦ 도심 내 유휴지, 자투리땅 활용, 옥상녹화, 벽면녹화 등을 통한 도시숲 확대 ◦ 상가 간판을 가린다는 민원 때문에 과하게 진행되고 있는 가로수 가지치기에 대한 보완책
추진상황
◦ 도시숲 확대 조성(유휴지 자투리땅 활용, 옥상녹화, 벽면녹화) - 도심속 대규모 도시숲 일환으로 도시과와 협의 만인공원(향교동 232-32 일원) 추진계획이며, 공원부서와 협업 지원 조성 예정임. - 건축과 빈집정비사업과 연계 자투리땅 녹화를 검토하였으나, 건축주 자체 부지 활용계획 등 부동의로 도심 자투리땅 녹화는 사실상 어려움. - 옥상녹화는 공공기관(사회복지시설) 녹색자금(100% 보조) 공모로 우선 추진하고, 시내 동지역 통장회의 시 시민 자발적 옥상가꾸기 동참을 홍보하겠음. - 벽면녹화는 도시재생사업(도시과) 용역 시 적극 반영될 수 있도록 협의하였고, 요천 100리(국도유지~식정구간) 덩굴장미 벽면 녹화 시행하였으며, 추가 발굴 중임. - 가로수 병렬식재는 보행자의 풍부한 녹음제공과 경관조성 효과는 있으나, 남원 시의 경우 보도폭이 좁고 포장구간 가로수 생육환경이 열악하여 녹지조성에 어려움이 있음. 시범적으로 교룡로(경찰서 앞) 병렬식재를 검토하겠으며, 도로 계획 단계 시 충분한 녹지공간 확보와 보도폭이 확보되도록 관련부서와 협의 시행하겠음. - 시가지 9개 노선 가로수 고사목 수요 조사를 실시하였으며, 연차별 보식 사업 시행 계획임. ·19년 가을철 도통, 월락 일원 우선 시행 예정 ·건설과 도로 유지보수 사업 시 수목 보식 협조 시행 ◦ 상가 간판을 가린다는 민원 때문에 과하게 진행되고 있는 가로수 가지치기에 대한 보완책 - 가지치기 대상은 병충해 피해가지, 쇠약지, 고사지, 맹아지, 피해우려지, 수형 조절이 필요한 가지, 안정상 문제되는 가지 등으로 「산림청 가로수 조성 및 관리규정」에 의거 실시하고 있음. - 상가주민들과 소통하여 가로수 고유 수형유지 등 관리에 철저를 기하고, 무단 훼손자에게 변상금 부과 등 적극적인 조치를 취하겠음.

발언일자 : 2019. 4. 9. (제230회)		발언의원 : 염봉섭 의원
발언내용	산림관광자원 활성화를 위한 제언
◦ 등산로 정비 - 견두산 등산로 이정표 및 안내판 정비 - 비홍재~노적봉~혼불문학관 등산로 이정표 정비 ◦ 산불예방 - 진화장비 보완 및 산불전문예방진화대원 충원 ◦ 철쭉 보식 등 산림녹화 – 바래봉 철쭉 보식
추진상황
◦ 견두산 등산로 이정표 및 안내판 정비 - 안내판 정비 완료 - 비홍재~노적봉~혼불문학관 등산로 이정표 6월 중 정비 예정임 ◦ 진화장비 보완 및 산불전문 진화대원 충원 - 산불전문 진화대는 3개조(26명), 차량 6대(진화3·수송3)로 운영되고 있음. - 상황 발생 시 진화인력과 이동차량을 고려하여 각 조별로 출동, 진화 활동을 하고 있음[조별 인원 9명, 차량 2대(진화1·수송1)]. - 산불전문 진화대원 충원은 예산규모, 이동차량 등을 감안하여 종합적 으로 검토하겠음. - 산불진화장비(접지톱, 일회용 배낭 등)를 보완 구입 완료하였으며, 노후 진화차량은 산림청과 전라북도에 차량 교체 구입 요청하였음.

추진상황
◦ 철쭉 보식 등 산림녹화 - 추진상황 ·숲가꾸기 사업(국비) 잡관목(6㎝ 이상) 제거 / 5년 주기 시행 : `07 ~ ·철쭉보육사업(시비) 잡관목․덩굴․고사목 제거 / 매년 : `16 ~ ※ 2018년 : 13㏊ / 40백만원 ·운봉읍 애향회 간담회(운봉읍․시의원․애향회․산림녹지과) : `18. 5월 ⇒ 철쭉 식재지 잡관목 제거, 동선개설, 편의시설 설치, 철쭉보식 협의 ·외래식물 제거 행사 참여(국립공원관리공단 주관) : `18. 8월 ·유관기관 간담회(서부산림청․국립공원관리공단) : `18. 9월 ⇒ 외래종 제거, 삽수 채취, 증식, 식재 협의 ※ 국립공원관리공단 측 바래봉 산철쭉 후계목 보식만 허용 가능 ·국립수목원 유용식물증식센터 산철쭉 증식법 개발 요청 : `18. 10월 ⇒ 연구과제로 선정, 예비시험 종자(산철쭉) 육묘 중 ·`19년 철쭉 보육 및 증식, 포토존, 데크사업비 100백만원 편성 사업 시행중 - 금후계획 ·철쭉 생육도모를 위한 하단부 전정 : `19. 6월 ·시 자체 묘목 증식(종자채취, 육묘) : `19. 6월 ~ ※ 종자 파종, 3년 육묘 후 노지 식재 가능 ·국립수목원과 산철쭉 육묘 지속 협의