2019. 6.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

환경사업소

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2019년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 강우시 하수관리 시범사업

◦ 노후하수관로 정비사업

◦ 남원[3단계] 하수관로 정비사업

◦ 소규모 마을하수처리시설 설치사업

◦ 소규모 마을하수처리시설 개량사업

◦ 하수슬러지 처리시설 관리대행 추진

◦ 소규모 마을하수처리시설 기능개선 및 완벽한 생활하수 관리

◦ 요천생태습지공원 사랑받는 공원 조성

◦ 달궁·반선 소규모 마을하수처리시설 미세목 자동스크린 설치

◦ 운봉·인월 및 소규모 하수처리시설 운영위탁

일  반  현  황

□ 기    구

									환경사업소장
									강 인 식
하수경영담당					하수시설담당								하수처리담당										마을하수담당
박 병 준					강 자 청								양 병 우										문 하 성
∘행정종합계획수립 ∘회계․시설물 관리 ∘공기업 특별회계 운영 ∘생태습지공원 관리					∘하수도 중장기계획 수립 및 추진 ∘하수관거정비, 마을하수도 사업 시행 및 유지관리								∘남원하수처리장 운영 ∘분뇨처리시설 운영 ∘하수슬러지 처리시설 관리·감독										∘운봉․인월 하수 처리장 운영 관리 ∘소규모하수처리시설 운영 관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	25	1	4	5	8	7
현 원	23	1	6	6	6	4	청 경 2 환경관리원 2 공 무 직 3
증 감	△2	-	2	1	△2	△3

2019년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 강우시 하수관리 시범사업(차집관로정비, 남원[2단계]하수관로정비) 본격 추진 ◦ 공공하수도시설 관리대행을 위한 타당성 검토 추진 ◦ 요천 생태습지공원 지속적인 시설정비

□ 하수도시설 지속적인 확충 및 유지관리

◦ 강우시 하수관리 시범사업 추진

- 하수관로(차집관로정비, 2단계 하수관로 정비) 정비사업 공사 착공

◦ 소규모 마을하수처리시설 설치사업 추진

- 금지 용전·사매 서도지구

◦ 노후 소규모 마을하수처리시설 개량사업 추진

- 와운·권포·장평·양평 하수처리시설

◦ 하수처리시설 기술진단을 통한 시설 유지관리 추진

- 남원공공하수처리시설, 분뇨처리시설, 소규모하수처리시설 5개소(달궁, 덕동, 학천, 반선, 신파) 기술진단 발주

□ 하수처리 노후시설물 개선 및 최적운영으로 청정하천 수질보전

◦ 하수처리시설 방류수 수질기준 준수

- 처리상태 : BOD 2.1㎎/L, SS 4.4㎎/L, T-N 13.372㎎/L, T-P 0.070㎎/L

(법적기준 : BOD 5㎎/L, SS 10㎎/L, T-N 20㎎/L, T-P 0.3㎎/L)

□ 하수처리장과 연계한 생태습지공원 운영·관리

◦ 요천생태습지공원 수목 및 초본류 식재, 쉼터조성, 야구장 복토, 대형주차장 설치 등 추진

◦ 요천생태습지공원 잡초제거 및 환경정비로 쾌적한 휴식공간 제공

	하반기 추진방향
◦ 공공하수도시설 관리대행 추진 ◦ 하수도공기업 자주재원 확충을 위한 하수도요금 적정화(인상) 추진 ◦ 하수처리시설 유지관리를 통한 주민 생활환경 향상

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

강우시 하수관리 시범사업

□ 개    요

구 분		차집관로 정비사업		남원(2단계) 하수관로 정비사업
위 치		➢ 남원시 일원 (8개하천)		➢ 남원시 일원 (6개지역)
사 업 량		➢ 차집관로 정비 L=31km		➢ 하수관로 정비 L=57km ➢ 배수설비 2,900여 가구
총사업비		➢ 42,000백만원(국29,400, 시12,600) ➢‘19년 : 6,725백만원		➢ 28,000백만원(국19,600, 시8,400) ➢‘19년 : 1,062백만원
사업기간		➢ 2015~2020(6개년)		➢ 2015~2020(6개년)

□ 추진실적

◦ 시범사업 대상 선정	: 2015. 02.

◦ 한국환경공단 위·수탁 협약 체결	: 2015. 03.

◦ 용역 발주	: 2015. 06.

◦ 기본설계 완료에 따른 VE검토 추진	: 2016. 05.

◦ 하수도정비기본계획(변경) 수립	: 2016. 05. ~ 07.

◦ 실시설계 완료	: 2018. 08.

◦ 공사착공	: 2018. 10.

□ 금후계획

◦ 공사추진	: 2020. 12월까지

노후하수관로 정비사업

◦ 노후하수관로 정밀진단(2016.04) 결과에 따른 정비로 도로함몰 등 안전사고에 선제적 대응

◦ 1993년 조성된 도통1택지는 당시 기 분류식화 되었으나 오접과 노후화로

금회 배수설비 정비계획 수립

◦ 동 시기에 수행하고 있는 「강우시 하수도정비 시범사업」과의 사업 경계를 명확히 구분하여 중복투자 방지

□ 개    요

◦ 사업위치 : 남원시 일원(죽항동, 왕정동, 향교동 일원)

◦ 사업내용 : 노후하수관로 정비 L=5.6km, 배수설비 300여 가구

◦ 사 업 비 : 9,785백만원(국비 6,117, 시비 3,668)

※ 2019년 사업비 : 5,286백만원(국비 2,393, 시비 2,893) - 배수설비 시비 500 포함

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2020년(4개년)

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: 2017. 02. ~ 2017. 11.

◦ 환경부 재원협의 등 행정절차 이행	: 2018. 05. ~ 2019. 05.

□ 금후계획

◦ 재원협의 완료	: 2019. 06월까지

◦ 공사추진	: 2019. 07. ~ 2020. 12.

남원[3단계] 하수관로 정비사업

◦ 하수량 과다발생 예방을 위하여 시가지 강우시 합류식 지역 및 운봉권 처리구역 내에서 이송되는 불명수 유입 방지 등 하수처리 운영비용 절감과 노후하수관로 정비 병행시행으로 안전한 하수시설을 확보하기 위함

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원처리구역 및 운봉처리구역

◦ 사업내용

- 남원처리구역 : 오수관로 설치 L=31.7km, 배수설비 2,281가구

- 운봉처리구역 : 오수관로 설치 및 개량 L=15.2km

◦ 사 업 비 : 27,200백만원(국비 19,040, 시비 8,160)

※ 2019년 사업비 : 2,625백만원(국비 1,838, 시비 787)

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2020년(4개년)

□ 추진실적

◦ 2018년 신규사업지구로 확정 내시	: 2017. 11.

◦ 기본 및 실시설계 용역시행	: 2017. 11. ~ 2018. 12.

◦ 설계 경제성검토(VE)용역 완료              : 2019. 05.

□ 금후계획

◦ 재원협의 및 행정절차 이행	: 2019. 07월까지

◦ 공사발주 및 착공	: 2019. 08.

◦ 공사추진	: 2020. 12월까지

소규모 마을하수처리시설 설치사업

□ 개    요

사 업 명	사업기간	사업량	총사업비
계		하수관로 L=15.74km 처리시설 2개소	14,783백만원 (국 10,348, 시 4,435)
용전지구 마을하수처리시설 설치사업	2016~2020	하수관로 L=11.4km 처리시설 Q=200㎥/일	11,474백만원 (국 8,032, 시 3,442)
서도지구 마을하수처리시설 설치사업	2017~2020	하수관로 L=4.34km 처리시설 Q=100㎥/일	3,309백만원 (국 2,316, 시 993)

□ 추진실적

◦ [용전지구] 기본 및 실시설계용역 준공	: 2018. 05.

◦ [용전지구] 오수관로 공사 착공(공정 50%)	: 2018. 06.

◦ [서도지구] 기본 및 실시설계용역 준공	: 2018. 12.

◦ [서도지구] 오수관로 공사 착공(공정 10%)	: 2019. 03.

□ 금후계획

◦ [용전지구] 하수처리시설 공사 착공	: 2019. 08.

◦ [용전지구] 공사 준공	: 2020. 12월까지

◦ [서도지구] 하수처리시설 공사 착공	: 2019. 08.

◦ [서도지구] 공사 준공	: 2020. 12월까지

소규모 마을하수처리시설 개량사업

□ 개    요

처리장명	사업기간	사업량	총사업비
계		4개소 개량	3,355백만원 (국 794, 시 2,561)
권포, 와운	2017~2019	권포 Q=50㎥/일 와운 Q=30㎥/일	1,615백만원 (국 380, 시 1,235)
양평	2018~2019	Q=50㎥/일	1,000백만원 (국 300, 시 700)
방촌	2019	Q=60㎥/일	740백만원 (국 114, 시 626)

□ 추진실적

◦ [권포,와운] 개량사업 인가 및 재원협의	: 2018. 09. 14.

◦ [권포,와운] 공사 착공	: 2018. 12.

◦ [양평] 소규모 하수처리시설 기본․실시설계	: 2018. 03. 08. ~

◦ [양평] 하수처리시설 공법 선정	: 2018. 12. 20.

◦ [방촌] 소규모 하수처리시설 기본․실시설계	: 2019. 02. ~ 06.

□ 금후계획

◦ [권포,와운] 처리시설 공사 준공	: 2019. 12.

◦ [양평] 처리시설 재원협의	: 2019. 06.

◦ [방촌] 하수처리시설 공법선정	: 2019. 06.

◦ [방촌] 인가신청 및 재원협의	: 2019. 07.

◦ [방촌] 공사착공 및 준공	: 2019. 08. ~ 12.

하수슬러지 처리시설 관리대행 추진

□ 개    요

◦ 사 업 명 : 하수슬러지 처리시설 관리대행

◦ 대행업체 : (유)일토씨엔엠, ㈜티에스케이워터

◦ 대행기간 : 2015. 07. ~ 2019. 12.(4년 6개월)

◦ 대행비용 : 1,676백만원/년(2019년도)

◦ 대행내용 : 하수슬러지 처리시설 운영, 유지관리 등

□ 추진실적

<위탁관리 성과>

◦ 가동일수 98일/5월말, 평균 하수찌꺼기(탈수케익) 반입량 29.1톤/일

- 시설용량(30톤/일) 대비 97% 처리

◦ 탄화된 하수찌꺼기(탄화물) 발생량 242톤/5월말

- 유기성 고형연료로 한국중부발전 보령화학에 공급되어 재활용(판매단가 10,000원/톤)

□ 금후계획

◦ 2019년 관리대행 성과평가	: 2019. 08.

◦ 운영방안 및 원가산정 용역	: 2019. 10.

◦ 사업수행능력 평가 및 업체선정	: 2019. 12.

- 소규모 마을하수처리시설 -

기능개선 및 완벽한 생활하수 관리

□ 개    요

◦ 주요시설 : 소규모 마을하수처리장 61개소

◦ 사 업 비 : 698백만원

◦ 사업기간 : 2019. 01. ~ 2019. 12. (연중)

◦ 사업내용 : 61개소 마을하수처리장 시설물 개선 및 유지관리

□ 추진실적

◦ 소규모 하수처리시설 중장기 관리계획 하수도기본계획 반영

- 소규모마을하수처리장 2020년까지 관로연결(14개소)

◦ 섬진강수계 소규모마을하수시설 기술진단실시	: 10개소

- 대    상 : 금지면, 송동면, 대강면

- 진단비용 : 100백만원

- 진단기간 : 2018. 03. 01. ~ 09. 01. (7개월)

◦ 마을하수시설물 유지관리 준설, 미생물 식종 등 시설개선	: 55건

◦ 소규모 마을하수시설 진입로 보수 및 법면 보수	: 4개소

□ 금후계획

◦ 마을하수처리시설 운영 및 집중관리(61개소)	: 2019. 01. ~ 12.

◦ 마을하수처리시설 덕동 외 4개소 기술진단 실시	: 2019. 01. ~ 12.

요천생태습지공원 사랑받는 공원 조성

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2019. 02. ~ 2019. 12.

◦ 총사업비 : 446백만원

◦ 사업내용 : 생태습지공원 시설 설치·보강 및 운영

- 쉼터(모정, 음수대) 및 대형주차장 조성, 초본류 식재, 사후 모니터링 용역 등

□ 추진실적

◦ 요천생태습지공원 접지보강 및 서지보호기 설치	: 2019. 2 ~  3월

◦ 요천생태습지공원 쉼터조성 공사	: 2019. 4 ~  7월

- 모정 및 파고라 설치 11개소(사업비:133백만원)

◦ 요천생태습지공원 대형주차장 설치 공사	: 2019. 4 ~  7월

- 주차장 조성 대형8면, 소형 11면(사업비:103백만원)

◦ 요천생태습지공원 야구장 복토공사	: 2019. 5 ~  6월

- 복토공사 16톤(사업비:10백만원)

◦ 생태습지공원 수목 식재공사	: 2019. 4 ~  5월

- 느티나무 15주, 팽나무 35주(사업비:10백만원)

◦ 생태습지공원 사후 모니터링 용역	: 2019. 2 ~ 12월

- 수질 및 수생태계 모니터링(사업비:10백만원)

◦ 생태습지공원 초본류 식재공사 실시설계 용역	: 2019. 4 ~  5월

□ 금후계획

◦ 생태습지공원 초본류 식재공사	: 2019. 6 ~  8월

- 생태습지공원에 적합한 수종 선정 검토 후 추진

달궁·반선 소규모 마을하수처리시설

미세목 자동 스크린 설치

□ 개    요

◦ 필 요 성 : 유입하수 내 협잡물 분리선별을 통한 수질개선 및 법적

방류수질 준수

◦ 사업기간 : 2019. 01. ~ 2019. 09. (9개월)

◦ 총사업비 : 2개소 100백만원(시비) [1개소 50백만원]

◦ 위    치 : 산내면 덕동리 산107-6 외 1개소

‣ 2개소 [달궁, 반선 하수처리시설]

◦ 사업규모 : 미세목 자동 스크린 2식

◦ 사업내용 : 미세목 자동 스크린 신규 설치

□ 추진실적

◦ 실시설계 실시	: 2019. 03.

◦ 조달구매 요청	: 2019. 04.

□ 금후계획

◦ 업체선정 및 스크린 설치	: 2019. 06. ~ 08.

◦ 스크린 시운전	: 2019. 09.

운봉·인월 및 소규모 하수처리시설 운영위탁

□ 개    요

◦ 필 요 성

‣ 운영관리 인력 부족 및 잦은 인사이동으로 인한 전문성 저하

‣ 소규모 마을하수처리시설별 처리공법 다양성 분포

‣ 환경기초시설 민간대행 및 위탁관리 전환추세

◦ 위탁일시 : 2019. 11. ~

◦ 시설현황

구 분	개소	처리용량 (㎥/일)	중계펌프장	수질관리	비 고
계	63	5,943	51개소
운봉하수처리장	1	800	2 개소	수질자동측정기 (TMS)	관리인력 : 2인
인월하수처리장	1	1,000	4 개소	수질자동측정기 (TMS)
소규모 마을하수처리시설	61	4,143	45 개소	현장 채수	관리인력 : 5인

□ 추진실적

◦ 하수도시설 관리대해 타당성 조사 용역 실시	: 2019. 02. ~ 05.

- 시설운영비 및 단순관리대행, 복합관리대행 방안 등 검토

◦ 타지자체 소규모마을하수처리시설 운영관리 견학	: 2019. 05.

□ 금후계획

◦ 관리대행업자 선정위원회 구성 및 관리대행 계획 수립	: 2019. 06.

◦ 관리대행 기술제안서 제출 공고	: 2019. 07.

◦ 관리대행 업체 선정	: 2019. 08.