2019. 9.

2019년 주요업무 추진실적

관   광   과

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2019년 주 요 업 무  결산

□ 2019년 주요업무 추진실적

◦「꽉 찬 1박 2일」관광 인프라 구축

◦ 제89회 춘향제

◦ 제27회 흥부제

◦ 2019년 소규모 축제 지원

◦ 한여름밤 막걸리 축제

◦ 광한루 600년 기념식 및 축하공연

◦ 고샘지구 추억의 거리 조성사업

◦ 남원 예촌마당 조성사업

◦ 남원전통가 조성사업

◦ 옛다솜 이야기원 조성사업

◦ 남원관광지 민간투자 개발사업

◦ 1시군 1대표관광지 육성사업

◦ 지리산 친환경 전기열차 도입

◦ 남원 드래곤 관광단지 조성사업

◦ 남원 관광종합개발계획 수립 용역

◦ 춘향터널 경관 개선사업

◦ 남원관광지 야외공연장 정비사업

◦ 남원예촌 관리·운영

◦ 전통문화체험지구 상설 프로그램 운영

일  반  현  황

□ 기    구

													관 광 과 장
													이 현 재
	관광진흥담당								축제기획담당										관광개발담당									관광시설운영담당
	양 선 모								양 효 상										김 종 학									정 미 옥
	▪관광상품 개발 및 홍보 ▪관광수요 창출 마케팅 ▪관광사업체 관리 ▪관광협의회 운영								▪춘향제 추진 ▪흥부제 추진 ▪소규모 축제 지원 ▪지역축제 육성위원회 지원										▪남원 예촌 지구 조성 ▪함파우 유원지 조성 ▪대표관광지 육성 ▪친환경 전기열차 도입 추진									▪남원예촌 종합운영계획 수립 ▪남원예촌 1지구 위탁관리감독 ▪남원예촌 2지구 관광시설운영 ▪남원예촌 3지구 관광시설운영

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	16	1	4	3	4	4
현 원	16	1	6	5	3	1	임기제 3 공무직 4
증 감	-	-	2	2	△1	△3

2019년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 관광트렌드를 선도하는 “꽉 찬 1박 2일” 관광기반 강화 ◦ 춘향제 및 한여름밤 막걸리축제 등의 성공적 개최 ◦ 남원 내 주요 관광지점을 연계하는 관광개발 인프라 조성 ◦ 구도심권과 광한루원을 연계하는 남원예촌의 관광거점화 구축

□ 관광트렌드를 선도하는‘꽉 찬 1박 2일’관광기반 강화

◦ 4계절 관광브랜드 슬로건 운영으로 남원관광 감성･통합 마케팅 추진

- 봄 : “風引春香”- 바람결에 봄 향기가 나는구나!

- 여름 : 600년 광한루가 부른다 “가자 ! 별이 쏟아지는 정령치 밤하늘, 남원으로”

◦ 600만 관광객 유치를 위해, 팸투어 등 관광마케팅 활동 적극 추진

- 팸투어 4회 운영, 서울 관광설명회 개최 1회, 수학여행 유치 활동

◦ 남원만의 특색있는 다양한 문화관광 상설 프로그램 진행

- 신관사또 부임행차 등 상설공연 32회, 관객맞춤형 얼씨구! 남원 84회 등

□ 내실 있고 성공적인 축제 개최

◦ 지역대표 공연예술제인 제89회 춘향제의 성공 개최

- 수준 높은 공연과 차별화된 공연예술 체계 정립

- 만족도 높고, 재방문응답률 높고, 안전사고 없는 축제로 호평

◦ 소중한 문화유산의 의미되새기는 광한루 600년 기념행사 성공 개최

- 다채로운 프로그램으로 의미와 재미가 있는 행사 추진

◦ 지역활성화에 기여한 한여름밤 막걸리 축제 성공 개최

- 여름휴가철 새로운 관광상품으로 관광활성화 기여

- 지역생산품의 우수성 홍보로 지역경제 활성화 기여

- 지역생산품(막걸리, 안주)을 활용해 관광객과 종사자 모두 만족

□ 남원의 관광개발 인프라 강화

◦ 시내권〔예촌(4․5지구)·함파우 일원 등〕관광개발사업 지속 추진

◦ 구 도심권과 남원예촌, 광한루원을 연계한 남원관광의 허브(Hub) 조성

◦ 친환경 전기열차 도입사업 적극 추진

◦ 남원관광지 민간개발사업 유치를 통한 관광 인프라 강화로 관광 연계성 확보

□ 남원예촌의 공간 소통력 제고로 새로운 관광거점 구축

◦ 구 도심권과 광한루원을 연계한 남원관광의 중심축 조성

◦ 남원예촌 전통한옥체험시설 체류형 관광객 증대 및 도시브랜딩 효과

⇨‘19.8.11. 기준 가동률 58.5%로서 전년 동일 대비 10.5% 증

⇨ 한국경제주관 신상품 브랜드 대상, 할리데이비슨, 포스코 등 제휴사 확대

◦ 남원예촌 문화체험지구 관광 거점화

- 계기성 행사 : 꽃담장, 설행사, 어린이날 행사, 춘향제 예촌무대 등

- 프로그램 운영 : 노상놀이, 버스킹, 이야기 할머니, 가훈쓰기, 전통

놀이, 조갑녀명무관 공연․전수, 꽃담열차 등

□ 남원예촌 관광매력도 향상 및 광한루원 관광객 구도심권 유입효과 증대

□ 상권 활성화 및 자발적 업종 변화 유도(관광수용형 – 음식, 카페, 공방, 체험 등)

2019년 주요업무 추진실적

「꽉 찬 1박 2일」관광 인프라 구축

□ 목    적

◦ 관광 트렌드의 점진적 변화추세를 감안한 맞춤형 관광 인프라 구축

□ 추진실적

◦ 지역자원의 홍보 자원화

- 계절별 남원관광 브랜드 슬로건 운영 및 홍보 (봄, 여름)

- 남원역사시계 홍보판 설치 : 6개소(광한루원, 만인의총, 춘향테마파크,        시청입구, 남원역, 지리산휴게소(광주방향))

- 어린이·청소년을 위한 알기 쉬운 남원스토리텔링형상화사업(웹툰 관광        안내판) 설치 : 4개소(광한루원, 만인의총, 만복사지, 남원성)

◦ 관광수요 확대를 위한 마케팅 활동

- 대도시 관광설명회 개최 : 1회 (서울, 100여개 여행업체)

- 국내, 외 관광 박람회 참가 3회 (내나라여행박람회, 중국 충칭 국제관광전 등)

- 관광객 유치협력 MOU 체결 : 한국대표여행사연합 (50개 회원사)

- 관광수요 창출을 위한 팸투어 실시 : 6회 (121개 여행관련업체,기자)

- 수학여행단 유치촉진 활동 : 은사봉사단 (4명) 5회, 100개교 (영남권)

- 신관사또 공연단 홍보활동 : 서울2회 (설명회1회, 광화문‘남원의 봄’행사)

- 투어패스(자유이용 권관광패스카드)‘남원춘향사랑권’운영 : 2019. 8. ~

- 스템프투어 여름이벤트 추진 : 2019. 7. 20. ~ 8. 25.

◦ 공무원 관광분야 역량신장 추진

- 열린 관광 활성화 소통포럼 : 1회 (전북발전 연구원, 전북디자인센터 등 30명)

- 문화관광시책 발굴투어 : 1회 (경기도 가평군, 3개 부서 10명)

◦ 지역 매력도 향상을 위한 관광환경 조성

- 관광약자 편의 제공 : 시각장애인용 점자 안내책자 발행 (300부, 배부처 : 8개소)

- 맞춤형 전통문화체험 프로그램 운영 :“얼씨구 남원”84회 (4 ~ 8월 / 춘향테마파크)

- 신관사또 부임행차 상설공연 운영 : 32회 (4 ~ 6월/남원관광지~광한루원)

- 환영 조형물 설치 : 회전 교차로 2개소 8점 (관광지, 구 남원역)

- 여름철 관광객 상설공연 제공 : 퓨전 마당극 “흥부가돌아왔다” 등 22회

□ 금후계획

◦ 지리산을 중심으로 하는“동부권 관광벨트”구심점 구축추진

- 백의종군길 이백 양가리 구간 대체 통로 개설 (500m, LF 협의)

- 흥부 대박길 조성 추진 : 인월 성산 ~ 아영 성리 구간 (15km)

◦ 가을철 상설공연 운영 : 신관사또 부임행차, 전통혼례 등 30회

◦ 동남아 외교사절 초청 팸투어 : 베트남, 필리핀 대사

제89회 춘향제

□ 개    요

◦ 일    시 : 2019. 5. 8.(수) ~ 5. 12.(일) / 5일간   ※ 5. 12. 초파일

◦ 장    소 : 광한루원 및 요천일원

◦ 종    목 : 4개 분야 24개 종목

◦ 예    산 : 1,802백만원(국 310, 시 902, 관광과 336, 자부담 254)

□ 추진실적

◦ 시민과 함께하는 즐기는 축제 구성

- 축제성 향상 : 기념식을 없애고, 다양한 장르가 융합된 개막공연 구성

- 시민참여 확대 : 전통 공연예술제 기반위에 퓨전과 대중공연 확대

(시민화합한마당, 어울림마당, 공개방송, 버스킹 등)

◦ 질서 있고, 편리한 축제 조성

- 공간별 중심테마 지정 운영 : 남원예촌(예술성), 광한루(전통성),

차없는거리·몽룡놀이터(가족), 승월교무대(젊음),

십수정무대(소통), 사랑의광장(화합)

- 편의시설 강화 : 공연 및 쉼터 신설, 셔틀버스 신설, 수유실 확대,

안내입간판 대폭 확대 (대형 6, 소형 10)

◦ 안전한 축제 구현

- 유관기관 유기적 협의 : 경찰서, 관련부서, 자원봉사단체 등

- 안전점검 철저 : 사고예방 대비 및 점검결과 신속 조치

- 경비용역 확대 운영

□ 금후계획

◦ 제90회 춘향제전위원회 구성 및 위촉	: 2020. 1월중

◦ 춘향제 행정지원단 파견                        : 2020. 1월중

◦ 춘향제전위원회 회의 및 추진상황 보고회	: 2020. 2. ~ 4.

◦ 제90회 춘향제 추진 및 결과보고회	: 2020. 5. ~ 7.

제27회 흥부제

□ 개    요

◦ 일    시 : 2019. 10. 11.(금) ~ 10. 13.(일) / 3일간

※ 흥부마을 터울림(인월, 아영) : 2019. 10. 7.(월) / 음력 9. 9.

◦ 장    소 : 사랑의 광장, 요천둔치 일원
◦ 주    제 : 우애·나눔·보은·행운

◦ 행사종목 : 4개 분야(기념, 공연‧경연, 체험, 연계)

◦ 예    산 : 397백만원(도 53, 시 220, 관광과 124)

□ 추진방향

◦ 남원시 대표 문화관광축제로 육성 : 춘향제 ⇒ 흥부제

- 국비 확보를 위한 행사 분리 대응

∙ 춘향제 : 지역대표 공연예술제 국비 확보 유지

∙ 흥부제 : 문화관광축제 국비 확보 노력

◦ 흥부제 주제에 맞는 프로그램 강화

- 대표축제 평가 고려 주제 부합하는 프로그램 중심 운영

- 흥부․놀부 소재 및 행운․나눔 중심의 오락성 프로그램 강화

◦ 흥부를 소재로 한 새로운 프로그램 구성

- 흥부가왕, 소규모 거리공연, 흥부소재 다양한 형태 공연 등

□ 추진실적

◦ 제27회 흥부제 시군대표축제 선정 (도비보조)     : 2019. 2. 18

□ 금후계획

◦ 흥부제전위원회 회의 및  추진상황 보고회	: 2019.  9. ~ 10.

◦ 제27회 흥부제 추진 및 결과보고회	: 2019. 10. ~ 11.

2019년 소규모 축제 지원

□ 개    요

◦ 바래봉 눈꽃축제 (12.29.~2.20. / 12.29.)	: 20백만원 / 운봉읍애향회

◦ 고로쇠 약수제 (2.15.~3.14. / 3.2.)	: 18백만원 / 산내면발전협의회

◦ 바래봉 철쭉제 (4.25.~5.19. / 5.4.)	: 15백만원 / 운봉읍애향회

◦ 봉화산 철쭉제 (4.12.~5.10. / 4.27.)	: 10백만원 / 흥부골아영발전협의회

◦ 지리산 단풍축제 (10월 중)	: 10백만원 / 산내면발전협의회

□ 추진실적

◦ 바래봉 눈꽃축제 : 겨울철 대표 관광상품으로 자리매김

- 꾸준한 방문객 증가 : 2019(38,417명), 2018(20,134명), 2017(18,949명)

◦ 뱀사골 고로쇠 약수제 : 참여형 프로그램 운영 만족도 증대

- 방문객 증가, 고로쇠 수요 증가, 먹거리 장터 등으로 지역 홍보 기여

◦ 바래봉･봉화산 철쭉제 : 가족단위 상춘객 지속 확대

- 지리산권 관광자원(백두대간생태공원, 허브복합토피아관)과 연계 홍보 필요

□ 쟁점 및 대책

◦ 바래봉 눈꽃축제는 지역축제 육성 목적 달성

- 안정적 수익 확보, 지속적 방문객 증가, 8년간의 노하우 축적

※ 바래봉 눈꽃축제 경쟁력 현황

-방문객 증가 : 15,588명(2016년) → 38,417명(2019년)

-입장료 수입 : 229백만원(2019년)

➡ 한정된 예산의 효율성을 기하고자 수입료 재투자 필요

□ 금후계획

◦ 지역축제육성위원 회의	: 2019. 9월 중

◦ 지리산 단풍축제	: 2019. 10월 중

한여름밤 막걸리 축제

□ 개    요

◦ 일    시 : 2019. 8. 2. ~ 8. 4. (3일간)

※ 광한루 600년 축하공연 병행

◦ 장    소 : 승월교 아래

◦ 참여업체 : 쑥쑥농부들, 우수농식품연구회, 농촌종합지원센터

◦ 소요예산 : 97백만원 (행사운영비 80, 시설비 17)

◦ 내    용 : 지역에서 생산한 막걸리와 안주 판매

□ 추진실적

◦ 지역경제 활성화 기여 축제

- 지역생산품 연계축제로 홍보 및 소비 촉진 기여

‣ 지역 막걸리 소비 : 6개 업체 9종 3,800여병 소비

‣ 지역생산품 활용 안주 : 묵, 두부, 식혜, 산나물 등 사용

- 지역민이 참여하는 음식 및 체험부스 운영으로 지역경제 활성화

◦ 안전하고 질서 있는 축제 구현

- 운영시스템 단순화로 이용편의 증진

․ 「성인인증 → 막걸리구입 → 안주구입 → 시식」의 단순 구성

․ 유관기관, 자원봉사, 경비인력의 적재적소 배치

․ 사전 안전점검 철저 : 시설조기설치 및 보완조치사항 철저 이행

․ 위험요소 사전 제거 : 가스→전기렌지 대체, 요천변 안전띠 설치,

이동진료소 상시운영, 경비인력 상시 배치

□ 문제점 및 대책

◦ 폭염으로 인한 무더위 대책 미흡

⇒ 쿨링포그, 선풍기 등 설치

◦ 안주가 늦게 준비되고, 기다리는 시간 과다 소요

⇒ 기본안주(고추, 양파, 오이, 된장) 긴급 지원

광한루 600년 기념식 및 축하 공연

□ 개    요

◦ 일    시 : 2019. 8. 3.(토)

◦ 장    소 : 광한루원 및 차없는 거리

◦ 주요내용

- 기념식, 기념식수, 타임캡슐, 타북행사, 붓글씨 퍼포먼스

- 부대행사 : 광한루 600년 축하공연, 한여름밤 막걸리 축제

◦ 예 산 액 : 285백만원(기념식 및 공연 215, 무대설치 50, 이벤트 20)

□ 추진실적

◦ 광한루 600년을 축하하는 다채로운 이벤트 진행

- 기념식 : 기념사․축사, 성주굿․비나리 공연, 편액․연혁낭독

- 이벤트 : 타임캡슐, 타북행사를 통해 광한루 의미를 되새김

- 기념식수, 학술대회, 신관사또행차, 효도결혼식 등 다양한 행사 진행

◦ 성대한 부대행사로 광한루 600년 축하 분위기 조성

- 붓글씨 퍼포먼스와 최소리 타악공연 등 새로운 연출로 이목 집중

- 다수의 관광객들과 시민들에게 광한루의 가치 제고

- 부대행사인 막걸리 축제로 관광도시 남원 홍보 기여

◦ 여름휴가철 남원방문 관광객의 만족도 상승

- 남원의 문화적 역량과 다양한 축제로 관광남원 홍보에 기여

□ 문제점 및 대책

◦ 기념식 장소(광한루각) 협소

⇒ 폭염으로 야외에서 행사가 어려워 그늘이 있는 광한루각 선정

고샘지구 추억의 거리 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 검멀1길, 검멀2길 일원

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2019년 (4년)

◦ 사 업 비 : 9,500백만원 (지특 4,700, 도비 2,500, 시비 2,300)

구 분	사업명	사업비	사 업 량	비 고
2016 ~ 2018	고샘지구 추억의 거리 조성사업	4,400	∙ 고샘길 L=140m/실개천 L=360m ∙ 고샘공원 정비 1식 ∙ 미러분수, 사모정 각1개소	완 료
2017 ~ 2019	고샘 테마길 조성사업	1,600	∙ 테마골목길 조성(14억) - 소리길, 춘향애인 만나러 가는길. 어린이 창작길, 남원홍보길,웹툰길 ∙ 야간경관조명(2억)	완 료
	남원 라키비움 건립사업	3,500	∙ 건축공사 (23억) - 연면적 494.98㎡ : [1층 170.99㎡, 2층 323.99㎡] ∙ 전시 및 인테리어 (8억)	완 료

□ 추진실적

◦ 고샘지구 추억의 거리 조성사업 시행 완료      : `18. 10. 완료

◦ 고샘 테마길 조성사업 시행 완료               : `19.  4. 완료

◦ 남원다움 라키비움 건립사업 건축공사 시행완료    : `19.  4. 완료

◦ 남원다움 라키비움 전시 및 인테리어 완료      : `19.  5. 완료

□ 금후계획

◦ 남원다움 라키비움 건축물 관리 이관(관광과→총무과) : `19. 9.

남원 예촌마당 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 광한루원 동문 일원

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2019년 (2년)

◦ 총사업비 : 3,800백만원 (지특 1,900, 도비 950, 시비 950)

◦ 사업내용 : 사랑 이야기관 ( 한옥구조 2층, 연면적 435.6㎡ )

- 리마인드 웨딩 프로포즈 공간, 명품 여성화장실 등

- 노닐마당(바닥분수, 실개천, 파고라, 조형물 등) 조성

사랑 이야기관(신축)

노닐마당

사랑 이야기관

바닥분수

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: `18.  12. 완료

◦ 토지수용재결 보상금 공탁(4필지/1명)	: `18. 12. 완료

◦ 건축, 조경, 전기공사 착공	: `18. 12. 완료

◦ 기존 건축물 철거	: `19.   2. 완료

◦ 지하매설물 및 건축(기초,벽체,지붕)공사	: `19.  8. 완료

□ 금후계획

◦ 노닐마당 조성	: `19.  9. ~ 12.

◦ 건축 내부 인테리어 공사	: `19.  9. ~ 12.

남원전통가 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 광한루원 동문 일원

◦ 사업기간 : 2019년(1년)

◦ 총사업비 : 8,000백만원(지특 3,300, 도비 1,350, 시비 3,350)

◦ 사업내용 : 거리예술장터 등 7건(66억원), 토지매입비(9억원), 설계비(5억원)

- 세부시설사업 현황

시설사업명	사업내용	비고
거리예술장터 조성	소형 야외공연장 설치(길거리 공연 등)
돌담길 로맨틱벤치 조성	광한루원 주변 돌담길 벤치 설치
광한루원 자동출입 시스템 구축	광한루원 자동출입 시스템 구축
포토존 조형물 설치	포토존 조형물 설치
광한루원 주변 경관 조성	바닥 및 광한루원 돌담 조경, 미디어파사드 등
요천변 야간 경관 조성	요천변 야간 조경 등
여행트레일 설치	바닥유도안내선 등 설치

□ 추진실적

◦ 지방재정 투자심사(전라북도-조건부)	: `18.  6.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수	: `18. 10.

◦ 편입토지 보상 협의요청	: `19.  1.

◦ 도시관리계획(문화시설) 결정	: `19.  7.

◦ 남원전통가 조성사업 착수	: `19.  7.

□ 쟁점 및 대책

◦ 감정평가 금액과 토지주 요구액 차이가 커 거리예술장터 토지 보상 어려움

- 도시계획시설(문화시설) 결정 후 수용절차 이행 검토

□ 금후계획

◦ 남원전통가 조성사업 시행	: `19. 8. ~ `20. 6.

◦ 야간경관 조성사업 착공	: `19. 11.

◦ 토지매입	: `19. 12.

옛다솜 이야기원 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 전북 남원시 어현동 37-158번지 일원(100,000㎡)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년(5년간)

◦ 총사업비 : 174억원(국비 81, 지방비 93) *지방비 토지매입 및 보상비 12억원 포함

☞ 2019년도 사업비 : 30억원(국비 15, 시비 15)

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	기투자	2019	2020	2021	2022
계	17,366	2,080	3,000	5,752	2,938	3,596
국 비	8,058	415	1,500	2,876	1,469	1,798
시 비	9,308	1,665	1,500	2,876	1,469	1,798

◦ 사업내용 : 옛다솜 이야기 정원, 사랑체험관 등

□ 추진실적

◦ 옛다솜 이야기원 조성 기본 및 실시설계용역 완료  : `19. 6.

◦ 도시관리계획 변경(유원지) 용역 완료              : `19. 8.

◦ 옛다솜 이야기원 기반시설 조성공사 착공          : `19. 7. 31.

- 총사업비 : 1,768백만원(도급 1,126, 관급 642) / ㈜엘케이토건

◦ 옛다솜 이야기원 2020년도 정부예산안 증액 반영   : `19. 8.

- 기재부 1차 심의 8억 반영 / 2차 심의 29억 반영

□ 쟁점 및 대책

◦ 옛다솜 이야기원 조성공사 전북도 원가심사 처리 지연으로 인해 사업 추진 및 예산집행 저조

□ 전북도 원가심사 신속 처리로 본 공사 조기 착공 및 예산집행 추진

□ 금후계획

◦ 도시계획시설 실시계획 인가 추진	: `19. 8. ~ 9월

◦ 옛다솜 이야기원 조성사업 공사 시행	: `19. 9. ~ `21. 12.

남원관광지 민간투자 개발사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원관광지 일원(어현동․노암동 일원)

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2021년

◦ 사 업 비 : 31,600백만원(민간투자 31,600)

◦ 노선계획

- 모노레일 : 춘향테마파크 ~ 함파우소리체험관 ~ 천문대

- 짚와이어 ⇨ 1코스 : 천문대~예촌마당(L=805m) / 2코스 : 천문대~소리체험관(L=431m)

◦ 시설규모 및 내용

- 모노레일(8인승, 15대, 총연장 2.16km) / 짚와이어(총연장1.24km, 짚타워 H=70m)

- 어드벤처 : 짚코스터(733m), 네트어드벤처(330㎡), 에코어드벤처, 트리클라이밍

◦ 민간투자업체 : ㈜삼안, EMTC, 챌린지코리아

□ 추진실적

◦ 남원관광지 민간개발 사업 제안서 접수            : `19. 5. 9.

◦ 남원관광지 민간개발 사업 투자협약 체결          : `19. 6. 5.

- ㈜삼안컨소시엄 ⇔ 남원시

◦ 노선측량 및 실시설계용역 추진                   : `19. 6. ~ 8.

□ 쟁점 및 대책

◦ 짚와이어 도착장(월매추어탕 주변) 토지매입 필요

□ 도시계획 시설결정 용역 추진 후 2020년도 본예산 반영(6억원)

□ 금후계획

◦ 행정절차 이행추진(도시관리계획, 각종 인허가 등) : `19. 9. ~ 12.

◦ 사업시행                                      : `20. 1. ~ `21. 12.

1시군 1대표관광지 육성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 광한루원(주거점), 남원관광지(부거점)

◦ 사 업 비 : 1,000백만원(도비 1,000)

◦ 사업기간 : 2019년

◦ 사업내용

- 상설 문화프로그램 및 공연(S/W) : 270백만원

- 광한루원 보행길 정비 및 야간경관 구축사업 추진 530백만원

- 전라북도 스마트 플랫폼 구축 : 200백만원

□ 추진실적

◦ 상설 공연 및 이벤트 S/W사업	: 연중 시행

- 광한루원 취타대 운영, 길벗도우미, ‘꼬까옷’ 한복대여, 포토존 조성 등 7건

◦ 광한루원 보행길 정비 및 야간경관 구축사업 설계	: `19. 1. ~ `19. 9.

◦ 전라북도 스마트 플랫폼 구축 협약 및 사업비 지급 : `19. 5.

- 재단법인 전라북도 문화콘텐츠산업진흥원 위탁 시행

□ 금후계획

◦ 전라북도 스마트 플랫폼 구축 시행	: `19. 6. ~ `19. 12.

◦ 광한루원 보행길 정비 및 야간경관 구축사업 시행	: `19. 9. ~ `19. 12.

- 위  치 : 광한루원 담장 보행길, 남원관광지 순환도로 일원

◦ 상설공연 및 체험프로그램 상설 운영	: 연중

- 신관사또부임행차 장비보강, 취타대 공연, 길벗도우미, 전통체험장 운영 등 7건

지리산 친환경 전기열차 도입

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주천면·산내면 일원

◦ 사업량/사업구간 : 실용화노선 12㎞(시험노선 1㎞) / 육모정~고기삼거리~정령치

◦ 사업비/사업기간 : 982억(정책연구 2, 기본계획 5, 실용화 노선 975) / 2018~2026년

1단계 정책연구 및 기본계획		2단계 시험노선 R&D 추진		3단계 실용화노선 구축
▷정책연구(국토부) ▷2억/국토부/‘18~’19 ▷기본계획(남원시) ▷5억/남원시/‘18~’19		▷시험노선 R&D 추진 (국토부/290억/‘20~’22년)		▷중앙투자심사 의뢰 (국토부→행안부) ▷실용화 노선 예산 확보 (975억/‘20~’26년)

□ 추진실적

◦ 친환경 전기열차 정책연구 시행(국토부)               : `18. 12.

- 착수보고회 개최(`19. 1. 15.) / 중간보고회 개최(`19. 7. 24.)

◦ 지리산 친환경 전기열차 기본계획 수립 용역 추진     : `19. 5. ~ 12.

- 착수보고회 개최(`19. 5. 15.)

◦ 지리산 친환경 전기열차 관련 철도안전정책관 면담    : `19. 7. 30.

□ 쟁점 및 대책

◦ 전기열차 시험노선 관련 2020년도 국가 R&D 예산(20억원) 확보 필요

□ 국회 / 국토부 / 전북도와 협의하여 2020년 R&D 예산확보 추진

□ 금후계획

◦ 지리산 친환경 전기열차 기본계획 중간보고회 개최      : `19.  9.

◦ 친환경 전기열차 시험노선 R&D 예산확보 활동        : `19. 9. ~ 12.

◦ 지리산 친환경 전기열차 기본계획 수립 및 국토부 제출  : `19. 11.

남원 드래곤 관광단지 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 대산면 옥율리 산131번지 일원

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2022년 (6년)

◦ 총사업비 : 190,272백만원 (민자 190,272)

◦ 사업개요 : 관광단지 조성(A=795천㎡)

- 가족/한옥호텔, 골프장(9홀), 워터파크, 오토캠핑장

- 남원전통문화테마시설, 아트뮤지엄, 테마식물원, 트리탑에코로드

□ 추진실적

◦ 관광단지 지정 및 조성계획 승인 통보/고시	: `18. 9. 3. / 9. 7.

◦ 국ㆍ공유지 용도폐지 및 교환 신청	: `18. 10.

※ 구거부지[용도폐지 신청 → 농정과(1필지)ㆍ건설과(7필지)]

※ 공유지 교환[대산면 옥율리 산177(시) ↔ 대산면 옥율리 산176(신한레저)]

◦ 금강마을 주민협의체 구성/운영	: `18. 12. ~

◦ 조성사업 착공	: `19. 1.

※ 골프장ㆍ단지내 도로ㆍ부지 토공정리(공정률 11%)

◦ 체육시설업 사업계획 변경승인(18홀→27홀, 도 체육정책과): `19. 6.

□ 쟁점 및 대책

◦ 신한레저와 마을 주민협의체 구성에 따른 상생방안 협의

□ 금강마을과 신한레저 지속협의 추진(남원시 중재)

□ 금후계획

◦ 국･공유지 매각 및 교환	: `19. 8. ~

※ 구거부지[농정과(1필지)ㆍ건설과(7필지) 승인, 자산관리공사 매각]

※ 공유지 교환

◦ 조성사업 시행	: `19. ~ `22.

남원 관광종합개발계획 수립 용역

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 전체

◦ 과업기간 : 2018. 10. 15. ~ 2019. 10. 9.

◦ 용 역 비 : 159,476천원

◦ 과업내용 : 관광종합개발계획수립 1식

◦ 수행기관 : 원광보건대학교 산학협력단 대표 이광영

- 책임연구원 : 소국섭 교수(원보전, 관광학 박사)

□ 추진실적

◦ 현황조사 및 자료 수집	: ‘18. 10. ~ ‘18. 12.

◦ 착수보고 (부시장)	: ‘18. 12. 19.

◦ 24개 읍․면․동 자문 및 자료수집	: ‘19. 3. ~ 4.

◦ 관광종합개발계획 수립용역 중간보고 (집행부)	: ‘19. 8.

◦ 관광종합개발계획 수립용역 중간보고 (의원총회)	: ‘19. 9.

□ 금후계획

◦ 관광종합개발계획 수립용역 시행	: ~ ‘19. 10. 완료예정

- 관광여건 및 현황분석,  - 관광수급 분석

- 종합분석 및 계획과제 도출,  - 관광개발 기본구상

- 관광개발 사업계획 및 타당성조사

- 관광 진흥계획,  - 재원 확보 조달계획 및 집행계획

※ 분야별 연구진 현황

현황분석 및 종합분석		기본구상 및 전략기획		관광자원 개발계획		관광진흥 계획		사업화계획
김연선 교수 (원보전) [관광경영]		소국섭 교수 (원보전) [관광개발]		유창근 교수 (위덕대) [관광경제]		김건 교수 (중부대) [관광개발]		이승길 교수 (남서울대) [관광경영]

춘향터널 경관 개선사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 사매면 춘향터널 일원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2020년 (2년)

◦ 총사업비 : 750백만원 (시비 750), `19년 설계비 50백만원 확보

◦ 사업내용 : 춘향터널 상부 측면 경관 조형물 및 조명 설치

현재
공모 선정 (안) 선정5건중 최다득표
	전주 -> 남원 방향	남원 -> 전주 방향

□ 추진실적

◦ 춘향터널 면판 디자인 공모(기획실)	: `18. 11. 12. ~ 12. 14.

※ 공모접수 11건

◦ 시정조정위원회 심의 결정(5건 선정)	: `18. 12. 21.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수(‘19. 9.완료예정)	: `19.  2. 착수

◦ 전북도 특별조정교부금(300백만원) 확보	: `19.  5.

□ 금후계획

◦ 유지관리기관(남원국도유지건설사무소)협의	: `19.  9.

◦ 사업 시행	: `19. 10. ~ `20. 7.

- 사업비 부족분 400백만원 제2회 추경 확보 예정

남원관광지 야외공연장 정비사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원관광지내 야외공연장(민속국악원 동편)

◦ 사업기간 : 2019. 5. 3. ~ 2019. 10. 29.

◦ 총사업비 : 300백만원(시비 300)

◦ 사업내용 : 관람석 및 바닥 정비 A=1,300㎡

※ 남원관광지 야외공연장 현황

□ 추진실적

◦ 야외공연장 정비 요청(국립민속국악원)	: `18. 10.  2.

◦ 관련부서(관광과, 문화예술과) 현장 점검	: `18. 10.  5.

◦ 국립민속국악원장 면담	: `18. 10. 12.

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: `19. 1. ~ 4.

◦ 시설공사 착공	: `19.  5.  3.

◦ 시설공사 완공	: `19.  8. 14.

- 관람석 정비 (개비온 벤치) 250석 규모

- 공연장 바닥 정비 (투수콘) A=650㎡, 배수시설 등

남원예촌 전통한옥체험시설 관리·운영

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 광한북로 17일원(전통한옥 체험단지11,079㎡)

◦ 사업내용 : 남원예촌 전통한옥체험시설 민간위탁 관리·운영

◦ 수 탁 자 : ㈜이랜드파크, 5년, 개관 : 2016. 7. 15.

□ 추진실적

◦ 한국관광의 별(`18.1.),전북 건축문화 대상(`18.10.), 한국경제주관 신상품브랜드대상(`19.1.)

◦ 운영현황(2019.8.11.기준)

(단위 : 백만원)

구분	운 영 현 황			지역경제 소비효과		비 고
	수입	비용	결산	소비효과	소비효과 포함결산	가동객실	이용객(명)	가동률	일반방문객
‘19	640	870	-230	980	750	2,850	8,300	58.5%	30,000
‘18동일 대비	증116	증70	증46	증166	증137	증465실	증1,290명	증10.5%	증12,300명
‘18동일(日)	524	800	-276	452	727	2,385	7,010	48%	18,700
‘18	941	1,276	-335	1,435	1,100	4,184	12,162	52%	33,000
‘17	863	1,198	-335	1,269	934	3,843	11,490	48.2%	21,250
‘16	429	506	-77	635	558	1,788	5,387	49%	8,500

※ 지역경제 유입효과는 방문객 1인당 118,000원 소비 기준(1박 2일)

◦ 가동률(%) 변동 추이 (`19. 8. 11.기준)

□ 금후계획

◦ 한옥체험시설 브랜딩 강화추진 (‘19 : 가동률 60% 달성 프로젝트)

·한국관광의 별, 전라북도 건축대상 등 활용 홍보마케팅 강화(온라인, 대도시권 등)

·남원예촌 중심 구도심권 연계관광 동선구축(남원예촌 권역 인식 확장)

※ 예) 군산 근·현대 관광권역(시간여행)의 한국 관광 100선 등재

·각종 브랜딩대상 공모(신문사, 협회 시행), MICE 유치 및 주요 법인 제휴 확장

※ 현재 제휴협약 리스트

익스피디아, 인터파크, 제네시스, 할리데이비슨, 포스코, 야놀자, 여기어때, 혁신도시 이전 공공기관(기관 임직원 전체), 과학기술인 공제회, 충남교육청, 경찰공제회, 하나투어, 모두투어, 호텔스토리, 샬렛코리아, 뉴딘골프홀딩스 등

◦ `18 회계연도 분 외부 회계감사 : 하반기

전통문화체험지구 상설 프로그램 운영

□ 개    요

◦ 기    간 : 3월 ~ 12월 / 연중

◦ 사 업 비 : 296백만원(도비 24, 시비 272)

◦ 사업내용 : 기획프로그램(설맞이, 어린이날) 운영, 상설프로그램 운영

프로그램	내 용	기간	일시	비 고
조 갑 녀 명 무 관	기획공연ㆍ전시, 공개전수, 일반교육	3월~6월 9월~10월	교육 매주 월 14:00~15:00	청 소 년 문화의집
관 서 당	체험(서당/전통), 재현(놀이극/의례)	4월~6월 9월~10월	매주 토ㆍ일 13:00~18:00	남원예촌 관 서 당
황희초당	이야기 할머니가 들려주는 황희ㆍ광한루	〃	〃	남원예촌 황희초당
예 루 원	체험, 전시, 판매, 행사, 공연 등	4월~12월	매주 토ㆍ일 10:00~18:00	남원예촌 예 루 원
꽃 담 장 (플프마켓)	플프마켓, 체험, 공연, 이벤트 등	4월~6월 9월~10월	격주(2/4) 토ㆍ일 11:00~18:00	남원예촌 문화마당
꽃담열차	남원예촌 문화체험지구 깡통열차 운행	〃	〃	〃
노상놀이	광한루 600년 변하지 않는 사랑이야기 - 광한루(황희), 오작교, 변사극 춘향전	5월~6월 9월~10월	매주 토 16:30~18:00	광한루원 남원예촌

□ 추진실적

◦ 기획행사 : 2개 분야 7회 <설맞이(2월), 어린이날 행사(5월)>

◦ 공모선정 : 2개 사업 64,000천원(노상놀이24,000,  동동동화축제40,000)

- 전라북도 거리극축제 노상놀이 공모 선정 ‘19. 2.

⇒ 광한루 600년 변하지 않는 사랑이야기(변사극 춘향전) 6회 추진

- 전라북도 겨울철 관광상품(축제) 운영 지원사업 공모 선정 ‘19. 7.

⇒ 원예산업과 협업으로 겨울철 바래봉 및 허브밸리일원 추진

◦ 남원예촌 관광형 장터 「꽃담장」 등 상설프로그램 운영 : 78회

- 꽃담장(7회), 조갑녀명무관(14회), 관서당(25회), 황희초당(24회), 예루원(8회)

□ 금후계획

[기획 프로그램]

◦ 남원상회 시범사업 (서문상가↔예촌 동선연결 : 물물교환형 문화마켓) : 10월중

[주말상설 프로그램]

내 용	수량	비고
◦ 관광형 장터 「꽃담장」상설프로그램	9회
◦ 조갑녀 명무관 전통춤 공연ㆍ전시ㆍ교육 등	7회
◦ 관서당 서당문화 및 전통문화(부채, 천연염색, 한지공예)체험	14회
◦ 황희초당 이야기 할머니 운영	14회
◦ 예루원 기획전시 및 행사 운영	상시
◦ 거리극축제 노상놀이 변사극 춘향전	9회

⇒ 광한루 관광객 이동 동선을 구 도심권으로 연계하여 지역경제 활성화 기여