2019. 9.

2019년 주요업무 추진실적

기업지원과

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2019년 주 요 업 무  결산

□ 2019년 주요업무 추진실적

◦ 산업단지 기반시설 정비

◦ 기업 경쟁력 강화 및 쾌적한 근로환경 조성

◦ 근로자 행복주택 건립

◦ 남원일반산업단지 산업용지 조기분양 추진

◦ 노암산업단지(3지구) 전략적 기업유치

◦ 재정지원으로 투자유치기업 경쟁력 강화

◦ 남원 일반산업단지 조성사업 추진

◦ 남원 일반산업단지 국고지원 사업

일  반  현  황

□ 기    구

									기업지원과장
									이 종 근
기업지원담당										투자유치담당														산단관리담당
조 철 현										안 민 엽														서 지 호
공장창업․설립 공장등록관리 산업단지입주 산업단지관리 중소기업육성 공공구매확대										기업유치 민간투자유치 투자기업지원 투자유치홍보														농공단지조성 일반산업단지조성 용지보상및수용재결 산업단지관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	12	1	3	5	2	1
현 원	10	1	3	3	1	2
증 감	△2	-	-	△2	△1	1

2019년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 산업단지 기반시설 정비 : 4개단지 807백만원 ◦ 중소기업 육성 기금 지원 : 17업체 / 3,800백만원 융자 - 이자 이차보전 지원 : 57개업체 / 159백만원 ◦ 중소기업 환경개선(뿌리기업 포함) : 16개업체 / 363백만원 ◦ 근로자 지원 및 역량강화 - 애향장려금 : 39명 / 39백만원, 전입정착금 : 9명 / 5.8백만원 ◦ 박람회 참가지원 : 8개기업 / 15.6백만원 ◦ 2019년 노암산업단지 3지구 분양실적 : 5블럭 / 67,144㎡ ◦ 지방투자촉진보조금 지원결정 및 지급 : 2개기업 / 29.5억원 ◦ 공공폐수 처리 설치사업 기본계획 변경승인(새만금지방환경청) - 폐수종말처리시설 당초 2,000톤 2단계 → 4단계 - 공공폐수 처리시설 기본 및 실시설계 착수 : 2019. 7. 4.(준공예정‘20. 2월)

□ 활기찬 강소기업 육성·지원

◦ 기업육성 지원

- 중소기업 육성기금융자 지원	: 17개업체 / 3,800백만원

- 중소기업 육성기금 이자 이차보전	: 57개업체 / 159백만원

- 중소기업 환경개선사업	: 15개업체 / 321백만원

- 국내․외 박람회 참가 지원	: 8개업체 / 15.6백만원

- 뿌리기업 그린환경 구축	: 1개업체 / 42백만원

◦ 근로자 지원 : 애향장려금(39명/39백만원), 전입정착금(9명/5.8백만원)

◦ 산업단지 기반시설 정비	: 4개단지 / 807백만원

◦ 기업 애로 해소 : 시책설명회, 소통간담회, 기업 애로 상담제 운영

◦ 중소기업제품 공공구매 확대 : 949억원(물품:396, 공사:426, 용역:127)

◦ 2018 기업하기 좋은 전북만들기 : 최우수기관 선정(인센티브50백만원)

□ 지역경제 활성화를 위한 기업유치 및 지원

◦ 노암산업단지 3지구 분양률 : 75%(분양완료 19, 미분양 3블럭)

◦ 남원산업단지 분양추진

- 분양대행사 지정, 조례개정을 통한 유치기업 지원강화, 분양홍보 등

◦ 신속한 공장 안정화를 위한 투자보조금 지원

- ㈜지엠에프 투자사업 정산 및 보조금 2차분 지원	: 10.5억원

- ㈜대명창호 지방투자촉진보조금 지원결정(2019. 6월)	: 19억원

□ 일반산업단지 조성사업 추진

◦ 용지보상 추진 : 318필지 699,355㎡ 중 314필지 695,641㎡ 완료(보상협의율 99.5%)

◦ 산업단지 조성사업 추진 : 777천㎡ 160억원 / 현재 공정률 62%

◦ 진입도로 개설사업 추진 : L=1.1㎞  20억원 / 현재 공정률 100%

◦ 공업용수도 건설사업 추진 : 상수도관로 L=15.7㎞ 29억원 / 현재 공정률 56%

◦ 공공폐수처리시설 설치 : Q=2,000㎥/일(1단계 400㎥/일) 7억원 / 기본 및 실시설계용역 추진

2019년 주요업무 추진실적

산업단지 기반시설 정비

□ 개    요

◦ 사 업 명 : 노후 산업단지 기반시설 확충 및 시설 개선사업

◦ 사업기간 : 2019. 1 ~ 12월

◦ 사 업 비 : 9개 사업 / 807백만원(균특 144, 시 663)

◦ 사업내용 : 산업단지 기반시설 보강 및 환경영향평가 등

□ 추진실적

단지명	사 업 명	사 업 내 용	사 업 비 (백만원)
계	9개사업		807
광치	광치산업단지 녹지지역 수목정비공사	벌목930주, 전정313주 등	288
노암1	공업용수 지하수 영향조사	노암1산업단지 지하수(2공) 영향평가 용역	10
	산업단지 통합배수지 원격감시 제어 시스템 구축공사	중앙감시실 HMI 프로그램 개량 노암배수지 계측제어 PANEL설치	20
노암2	노암산업단지 2지구 가압장포장 및 휀스 보강공사	옹벽블럭 (H=1.5m) L=20m 콘크리트포장 A=396㎡	20
	노암산업단지 2지구 사후환경 영향조사	A=179,963㎡ / 사후환경영향조사용역 1식	120
노암3	노암산업단지 3지구 환경보전방안용역	A=325,396.4㎡, 환경영향평가 협의내용 변경 1식	11
	노암산업단지 3지구 경계지역 배수로 설치공사	이중벽PE관(D700) L=182m A+C포장 A=10㎡	99
	노암산업단지 3지구 도로 법면 보강공사	흙깍기 261㎥,사석쌓기(H=1.8~3.0m) A=339㎡	149
	노암산업단지 입구 쉼터 조성공사	교목류 식재 20주, 남천 126주 관목식재 588주, 개나리 식재 136주	90

□ 금후계획

◦ 광치산업단지 내 구내식당 환경정비	: 2019. 9.

◦ 노후농공단지 상수관로 정비사업 도비 예산확보	: 2019. 9.

◦ 2020년 시설보수대상 현황 파악	: 2019. 9. ~ 10.

기업 경쟁력 강화 및 쾌적한 근로환경 조성

□ 개    요

◦ 경영난 해소를 위한 중소기업 육성기금 융자지원

◦ 관내기업 청·장년층 근로자의 사기 진작을 위한 애향장려금 지급

◦ 근로자의 안정적인 가족 정착을 위한 전입정착금 지급

◦ 쾌적한 근로환경 조성을 위한 중소기업 환경개선사업

◦ 기업 애로 해소를 위한 시책설명회 및 소통 간담회 추진

□ 추진실적

◦ 중소기업육성기금 융자 지원	: 17개 기업 / 3,800백만원

◦ 중소기업 육성기금 이자 이차보전	: 57개 업체 / 159백만원

◦ 애향장려금 지원 : 39명 / 39백만원, 전입정착금 지원 : 9명 / 5.8백만원

◦ 박람회 참가 지원	: 8개 기업 / 15.6백만원

◦ 중소기업 환경 개선사업(뿌리기업 포함)	: 16개 기업 / 363백만원

◦ 기업 애로 해소를 위한 현장 소통 행정 강화

◦ 2018 기업하기 좋은 전북 만들기 평가결과 최우수선정(시상금50백만원)

◦ 제17회 전라북도 우수중소기업인상 수상(지역발전공헌부문 ㈜재성) : 2019. 5. 17.

□ 금후계획

◦ 중소기업육성기금 융자지원(4개 기업 / 12억원)	: 2019. 9~12월

◦ 애향장려금 지급(25명 / 25백만원)	: 2019. 9월중

◦ 근로자 전입정착금(10명 / 4백만원)	: 2019. 9~12월

◦ 박람회 참가 지원(3개 기업 / 6백만원)	: 연중

◦ 뿌리기업 그린환경 시스템 구축(1개 업체 / 42백만원)	: 2019. 6~12월

◦ 근로자 역량강화교육(4회 / 1,000명)	: 2019. 10~12월

◦ 근로자 화합 한마당(중소기업인회 주관)	: 2019. 11~12월

◦ 기업 애로 해소 상담제 지속 운영	: 연중

근로자 행복주택 건립

□ 개    요

◦ 위    치 : 노암산업단지 3지구 지원시설용지 내 / 3,752㎡(1,137평)

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2022년(3년)

◦ 사 업 량 : 120세대 정도(수요조사 후 세대수 확정) / 세대 당 47㎡이하

◦ 예 산 액 : 120억〔국비(30%), 주택기금융자(40%), 자부담(LH 20%, 남원시 10%)〕

◦ 사업추진 : LH전북본부와 협력하여 국토교통부『행복주택사업』공모

◦ 노암산업단지 입주 기업 근로자 현황

합 계		1단지		2단지		3단지
기업체수	근로자	기업체	근로자	기업체	근로자	기업체	근로자
44	752명	22	320	11	335	11	97

□ 추진실적

◦ 대상 부지 사전 컨설팅(LH전북본부)	: 2019. 2. 21.

◦ 산업단지내 무주택 근로자 수요조사 실시(215명)	: 2019. 5. 10.~5. 21.

◦ 행복주택 사업계획서 본사 접수(LH전북본부→LH 본사)	: 2019. 6. 19.

◦ LH 본사 업무담당자 남원 현장 방문(차장,과장)	: 2019. 7.  9.

□ 쟁점 및 대책

◦ 사업부지 지구단위계획 변경 필요[층수(4층→8층), 높이(20m→35m)]

⇒ 경미한 사항에 해당 하여 남원시 지구단위계획 변경으로 가능(도시과)

□ 금후계획

◦ 행복주택 사업계획서 LH본사 경영진 내부 검토 진행 중	: 2019. 8~9월

- 사업 부지에 대한 경제성 등을 종합적으로 검토하여 사업 확정 예정

◦ 국토교통부 행복주택 사업 계획서 제출	: 2019. 9~10월중

◦ 행복주택 사업추진 MOU체결(남원시+LH)

남원일반산업단지 산업용지 조기분양 추진

□ 분양개요

◦ 면    적 : 45블럭 587,993㎡

- (분양면적) 40블럭 496,206㎡, (임대면적) 5블럭 91,787㎡

◦ 분양 및 임대 가격

- 분  양 : 98,530원/㎡ (325,000원/3.3㎡)

- 임  대 : 보증금 분양가의 10%, 연간 임대료 분양가의 1.5%, 임대기간 5년(연장가능)

◦ 분양업종 : 음·식료품, 금속가공, 전자·전기 장비, 자동차 부품 등 제조업

□ 추진실적

◦ 분양공고 및 입주계약 체결 착수	: 2019. 6~8월

◦ 산업단지 분양대행(주식회사 KICC) 업무협약 체결	: 2019. 8월

◦ 노암·사매산업단지 유치업종기업 대상 홍보물 발송	: 6회 / 2,300부

◦ 전북도·남원시 협업 권역별 화장품 기업방문(전남, 광주, 대전, 세종, 천안)

◦ 방송매체(YTN), 용산역 및 강북미디어 전광판, 고속도로 휴게소, SNS 등 홍보

◦ 투자환경개선을 위한 「남원시 기업 및 투자유치촉진조례」개정	: 2019. 9월

□ 금후계획

◦ 2019년 남원일반산업단지 투자환경설명회 개최

- 추진계획 수립(장소, 초청기업 확정 등)	: 2019.  9월

- 투자환경설명회 개최	: 2019. 10월

◦ 투자유치자문단 구성

- 추천명단 확보 및 참여의사 확인	: 2019.  9월

- 투자유치 자문단 위촉식 개최	: 2019. 10월

◦ 투자의향 기업 방문, 매체활용 등 다채로운 방식의 투자홍보 실시

노암산업단지(3지구) 전략적 기업유치

□ 분양개요

◦ 면    적 : 25블럭 208,423㎡

◦ 분양가격 : 75,020원/㎡ (248,000원/3.3㎡)

◦ 대금납부 : 계약금 10%, 선수금 30%(계약일로부터 90일 이내 납부)

잔금 3년 거치 5년 분할상환(연리 2.5%)

◦ 분양업종 : 화장품, 식료품, 음료, 금속가공, 전자부품 등

□ 추진실적

◦ 2018년까지 분양실적	: 14블럭 / 89,464㎡

◦ 2019년 상반기 분양성과	:  5블럭 / 67,144㎡

구 분	대상기업	면 적(㎡)	투자규모(억/명)	비 고
	4개 기업	67,144
투자 협약	㈜대명창호	15,670	100 / 20	건 축 중
	㈜꾸러미	7,819	70 / 15	2019. 9월(입주예정)
	㈜코빅스	29,123 (2블럭)	300 / 150	2019. 9월(입주예정) ※ 지질조사 실시 : 8. 19
사업확정	화장품지식산업센터	14,532		일자리경제과

※ 누적분양률 : 75%(2019년 8월 기준)

- (분양완료) 19블럭, 156,608㎡, (미분양) 6블럭, 51,815㎡

□ 금후계획

◦ 노암3지구 협약기업(코빅스 2블럭, 꾸러미 1블럭) 입주 지원

◦ 협상기업 동향점검 및 수시 방문으로 신속한 투자결정 요청

- 주요협상기업 : 씨앤오코스메틱, ㈜조은, 첨단ENG, ㈜태봉 등

◦ 남원사매산업단지 준공 전(2020. 6.) 노암산업단지(3지구) 분양완료 추진

재정지원으로 투자유치기업 경쟁력 강화

□ 개    요

◦ 지방투자촉진보조금(국비·도비·시비 매칭지원)

- 관련규정 : 산업통상자원부 지원고시

- 대상기업 : 수도권이전기업, 신·증설기업, U턴기업

◦ 투자보조금(순 시비지원)

- 관련규정 : 남원시 기업 및 투자유치 촉진조례

- 대상기업 : 국내이전기업, 창업기업, 대규모투자기업

□ 추진실적

◦ ㈜지엠에프 투자사업 정산 및 투자보조금 2차분 지급

- 정산결과 : 설비투자 및 고용계획 등 사업계획 적정이행 확인

- 2차분 지급(2019. 6월) : 10.5억원(국비 8.4, 도비 1.5, 시비 0.6)

※ 총 지원액 : 35.1억원 [1차 지급(2018. 5월) : 24.6억원]

◦ ㈜대명창호(노암3) 지방투자촉진보조금(국·도비) 지원확정	: 2019. 6. 26.

- 지원 결정금액	: 19억원(국비 15.2, 도비 2.7, 시비 1.1)

- 1차분 지급(2019. 8월)	: 13.3억원(국비 10.6, 도비 1.9, 시비 0.8)

□ 금후계획

◦ ㈜코빅스 투자사업 착수 및 보조금 지원신청	: 2019.  9월

※ 신청예상 규모 : 70억원 정도(국비 56, 도비 10, 시비 4)

◦ 보조금 지원결정(산업통상자원부) 및 1차분 지급	: 2019. 11월

남원 일반산업단지 조성사업 추진

□ 개    요

◦ 위치/면적 : 사매면 월평리 산37-3번지 일원

- 토지이용계획 : 777천㎡(산업시설 588, 지원시설 6, 공공시설 183)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2020년(4개년)

◦ 주요유치업종 : 금속, 음료식품, 전자, 전기장비, 자동차부품 등

◦ 총사업비 : 649억원(특별교부세 10, 시비 639)

◦ 연도별 투자계획                                       (단위: 억원)

구 분	총 계	기투자	2017	2018	2019	2020이후	비 고
총 계	649	222	100	172	42	113
공 사	361		90	166	41	64	폐수처리부담 (57억원)포함
보 상	190	185	1	4
용 역	45	32	4	1	1	7
기 타	53	5	5	1		42

□ 추진실적

◦ 일반산업단지 조성 사업(1차분) 준공	: `18. 5. 25.

◦ 일반산업단지 조성 사업(2차분) 착공(전체 공정률 62%)      : `18. 4. 23.

◦ 미철거 이전 지장물 철거 완료(인도단행 3건, 방해금지 3건, 자진철거 2건)  : `19. 3. 30.

◦ 산업단지 관리기본계획 고시(임대용지 91,787㎡, 판매용지 502,258㎡) 완료   : `19. 6. 28.

◦ 지적확정측량 용역 착수(수행자 선정 : 한국국토정보공사 외 2개사)   : `19. 7.  4.

□ 쟁점 및 대책

◦ 산업단지 계획에 따른 농기계수리점 3,714㎡ 협의 보상 추진

□ 사매농기 편입부지 제척은 타당성 결여로 산업단지계획에 따른

협의 보상 추진

□ 금후계획

◦ 산업단지 조성사업 추진(현공정률 60% → 12월말 공정률 85%)	: `19. 12.

- `20년 6월 준공 추진

◦ 지적확정측량 용역 준공	: `20.  5.

남원 일반산업단지 국고지원사업

[진입도로, 공업용수도, 공공폐수처리시설]

□ 개    요

◦ 사업별 상세조서                                       (단위 : 억원)

구 분	총 계	진입도로	공업용수도	공공폐수처리시설
총사업비	358	146	94	118
사 업 량		L=2.1㎞(B=19~22m) 북측 0.9㎞, 남측 1.2㎞	관로 L=16㎞(D350㎜) 배수지(2,000㎥) 1식	Q=2,000㎥/일 (1단계 400)
사업기간		2016~2019년	2017~2020년	2019~2021년
진행과정		공사중(공정률100%)	공사중(공정률56%)	기본 및 실시설계 추진

◦ 연도별 투자계획                                        (단위 : 억원)

구 분	총계	기투자	‘17	‘18	‘19	‘20	‘21이후	비 고
총 계	358	75	55	43	54	83	73
진입도로(국비)	146	75	51	20
공업용수도(국비)	94		4	18	29	43
공공폐처리시설(국비)	118			5		40	73

□ 추진실적

◦ 일반산업단지 진입도로 개설사업 착공(현공정률 100%)         : `16. 1. 21.

◦ 일반산업단지 공업용수도 건설사업 착공(현공정률 56%)        : `18. 6. 26.

◦ 공공폐수 처리시설 기본계획 변경 승인                       : `19. 4. 25.

- 새만금지방환경청, 2,000톤 / 2단계 → 4단계

◦ 공공폐수 처리시설 기본 및 실시설계용역 착수                : `19. 7.  4.

□ 쟁점 및 대책

◦ 폐수처리 방식(공공폐수처리시설) 변경에 따른 공공폐수 처리시설 설치사업 추진 지연

□ `20년 2월 기본 및 실시설계 완료 공사발주 추진

□ 금후계획

◦ 공공폐수 처리시설 기본 및 실시설계용역 추진	: `19. 7. ~ `20. 2.

◦ 진입도로 개설사업 준공	: `19.  8.

◦ 공업용수도 건설사업 추진(현공정률 56% → 12월말 공정률 65%)	: `19. 12.

- `20년 12월 준공 추진