2019. 9.

2019년 주요업무 추진실적

농촌활력과

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2019년 주 요 업 무  결산

□ 2019년 주요업무 추진실적

◦ 농촌활력프로그램(지역역량강화)

◦ 행복한 농촌만들기

◦ 생생마을 만들기

◦ 농촌 중심지 활성화

◦ 기초생활거점육성

◦ 마을 만들기(권역개발)

◦ 마을 만들기(마을단위, 자율개발)

◦ 2020년 일반농산어촌개발 신규(공모)사업

◦ 도시민농촌유치 및 귀농귀촌활성화 지원

◦ 소규모 삶터 조성지원

◦ 귀농귀촌인 유입 및 안정적 정착 지원

◦ 귀농귀촌 가족실습농장 조성

◦ 농식품 가공산업 육성 및 고부가가치 창출

◦ 농촌융복합(6차)산업화

일  반  현  황

□ 기    구

					농촌활력과장
					배 세 근
농촌활력담당				농촌개발담당				귀농귀촌담당			농식품산업담당
김 맹 수				조 대 성				류 창			이 주 영
∘농촌관광개발 ∘농촌마을역량강화 ∘농촌관광거점마을 ∘생생마을만들기 ∘농촌민박육성 ∘농촌체험휴양마을				∘일반농산어촌개발 ∘농촌중심지활성화 ∘기초생활거점 ∘생활환경정비 ∘마을만들기 ∘시군역량강화				∘귀농귀촌지원 ∘도시민유치 ∘도 농 교 류 ∘신규전원마을 ∘소규모삶터 ∘귀농종합센터			∘농식품산업개발 ∘농식품기업육성 ∘농식품 6차산업화 ∘전통식품육성 ∘식품 R&D사업 ∘지역전략식품산업

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	16	1	4	4	4	3
현 원	14	1	4	4	2	3
증 감	△2	-	-	-	△2	-

□ 농촌체험휴양마을 현황

구 분	읍면	마을명	지정일	주 소	비고
계		15개
권역	이백	요천다슬기마을	′12.12.28	이백면 황산로 89
권역	보절	벌촌천황봉	′12.12.28	보절면 벌촌길 28
권역	아영	흥부마을	′11.11.02	아영면 흥부로 275
권역	사매	노봉혼불문학	′12.08.30	사매면 서도길 31
권역	주천	지리산나들락	′17.07.06	주천면 정령치로 101-16
향토산업	덕과	란두리덕동마을	′11.12.14	덕과면 덕과덕동안길 10-4
향토산업	인월	달오름마을	′10.11.06	인월면 인월서길 42
향토산업	산내	선돌촌마을	′14.07.29	산내면 입석길 95
향토산업	산동	만행산상신마을	′17.03.28	산동면 대기대상길 428
창조마을	산내	원천마을	′10.03.22	산내면 산내원천길 33
녹색농촌	아영	봉대마을	′18.10.31	아영면 봉대아랫길 4
맛체험	보절	추어마을	′10.11.05	보절면 용동길 28
관광거점	운봉	전촌동편제마을	′11.11.02	운봉읍 가산화수길 51-2
6차산업	운봉	산덕마을	′14.07.29	운봉읍 산덕길 15
장수마을	주천	하주발효마을	′18.08.21	주천면 고주로 1274

□ 농촌민박 현황

(2019. 7월 기준)

구분	계	산내	주천	인월	운봉	산동	대강	대산	아영	이백	금지	보절
개소수	281	196	34	23	18	3	1	2	1	1	1	1

□ 농촌개발사업 현황

사 업 명	개 소	사 업 장	비 고
계	51
농촌중심지 활성화사업	6	인월, 운봉(선도지구), 금지, 산내, 대강, 사매
기초생활거점육성사업	2	아영, 산동
마을만들기 (권역종합개발)	7	사매 서도, 아영 성리, 이백 남계, 보절 황벌, 주천 장안, 운봉 공안, 덕과 신양
마을만들기 (마을단위)	19	산동 부서, 산내 원천, 운봉 전촌, 인월 서무, 주생 중동, 금지 매촌, 대산 왈길, 아영 율동, 주천 회덕, 아영 아곡, 산동 등구, 운봉 매요, 아영 외인, 아영 두락, 주천 하송, 운봉 권포, 사매 상신, 송동 두곡, 주생 대지
마을만들기(자율개발)	9	수지 서당, 사매 수월, 송동 부석, 송동 송내, 이백 효기, 아영 서정, 사매 수동, 덕과 용산, 아영 봉대
시군창의	2	상생플랫폼, 서도역
시군 지역역량강화	5	남원시 일원
활기찬 농촌프로젝트	1	주천 용담

□ 귀농귀촌 유입현황(2019년 7월 말 기준)

◦ 연도별 현황

구분	합계	ˊ07~11	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
가구수	4,525	261	247	360	490	609	779	671	702	406
귀농	2,213	182	149	203	190	344	423	322	259	141
귀촌	2,312	79	98	157	300	265	356	349	443	265
인구수	7,281	586	578	736	802	944	1,084	956	1,015	580

◦ 귀농귀촌 유형/ 연령별 현황

(2019. 7월 기준)

구분	유 입 가구수	유 입 인구수	유입유형		성별		연령 및 성별
			귀농	귀촌	남자	여자	30대 (39세이하)		40대		50대		60대		70대 (이상)
							남	여	남	여	남	여	남	여	남	여
가구수	406	580	141	265	316	264	80	83	49	45	89	64	74	53	24	19
비율	100	100	35	65	54	46	14	14	8	8	15	11	13	9	4	3

◦ 읍면동별 내역

(2019. 7월 기준)

구분	읍면동	운봉	주천	수지	송동	주생	금지	대강	대산	사매	덕과	보절	산동	이백	인월	아영	산내	노암	왕정	향교	도통
가구	406	104	28	6	13	13	14	15	9	6	1	43	30	31	27	16	28	4	5	12	1
인구	580	133	37	8	24	20	15	17	15	8	2	100	32	43	38	25	32	7	9	14	1
비율	100	25.6	6.9	1.5	3.2	3.2	3.4	3.6	2.2	1.5	0.2	10.6	7.4	7.6	6.7	3.9	6.9	1.0	3.0	0.2

□ 농식품 가공 현황

◦ 식품제조가공업체 : 142개소             ◦ 축산물가공업체 : 7개소

◦ 식품(축산물) HACCP 인증업체 : 31개소  ◦ 주류제조업체 : 12개소

□ 농촌융복합산업(6차)사업자 인증 업체 : 20개소

품 목	업체수	주요생산품목
한과류·누룽지·부각류	4	- 야콘, 한과, 누룽지, 부각
음료·쥬스류	4	- 배즙, 양배추즙, 잼
묵류·장류·유지류·다류	4	- 묵, 청국장, 들기름, 허브차
즉석식품	3	- 추어탕, 오리훈제, 미숫가루
반가공	1	- 절임배추, 고사리, 메주
기타(벌꿀, 화분 등)	4	- 조청, 두부, 농촌체험, 직판장

2019년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 농촌활력프로그램 : 11개 프로그램, 27마을(2,480명) 참여, 70백만원 ◦ 농촌관광거점마을 준공 및 운영 : 3,167백만원 ◦ 2020년 일반농산어촌개발 신규 공모사업 대응 : 13개, 18,800백만원 ◦ 농촌축제지원 : 서도역 소풍, 대강 유채꽃축제 ◦ 귀농귀촌 유치 : 406가구, 580명(2019. 7월말 현재) ◦ 귀농귀촌 가족실습농장 준공 및 운영 : 준공(6. 13.), 10가구 입주완료 ◦ 농식품 가공산업 육성 및 고부가가치 창출 추진 : 7개사업, 910백만원 ◦ 6차산업 핵심경영체 육성 농촌융복합산업 활성화 기반조성 : 2개사업, 160백만원

□ 활력있는 농촌마을 조성

◦ 농촌관광거점마을 : 동편제마을 3,167백만원

◦ 생생마을만들기 : 기초단계 6개소 30백만원, 사후관리 2개소 50백만원,       중간지원조직 150백만원, 농촌과소화 74백만원, 산촌마당 12백만원

◦ 농촌체험휴양마을 육성 : 233백만원, 사무장 지원, 역량강화, 박람회 참가지원

◦ 농촌관광시스템 육성 : 147백만원, 농촌관광 전문팀 운영 및 사업시행

◦ 농촌민박사업자 서비스·위생·안전 교육 실시 : 3회 256명

◦ 제1회 남원시 농촌자원·경관 사진공모전 : 274점 접수, 41점 입상

□ 창의적인 농촌지역개발로 삶의 질 향상

◦ 농촌중심지 개발 : 6개지구(인월, 운봉, 금지, 산내, 대강, 사매) 36,900백만원

◦ 기초생활거점 육성 : 2개지구(산동, 아영), 8,000백만원

◦ 마을 만들기(권역단위) : 1개지구, 3,757백만원

◦ 마을 만들기(마을단위) : 17개지구, 9,409백만원

◦ 농촌생활환경정비 : 5개소, 407백만원

◦ 활기찬 농촌프로젝트 시범사업 : 1개지구, 8,000백만원

□ 귀농귀촌 유치 활성화 및 안정적 정착 지원

◦ 귀농·귀촌인 유입 성과 : 406가구 580명(ˊ19. 7월 기준, 목표대비 139%↑)

◦ 귀농 창업자금 및 주택구입(신축)자금 융자 지원(31가구 6,680백만원)

◦ 귀농귀촌 홍보 프로그램 운영 : 수도권홍보관 운영(2회/80명), 전라북도 귀농귀촌 상담홍보전 참가(2회/150명), 춘향제 귀농귀촌 홍보 및 상담부스 운영, 전북도 귀농귀촌 지자체 설명회(1회/30명), 홍보 팸플릿 제작

◦ 귀농귀촌 교육 프로그램 운영 : 도시민 초청 농촌체험(1회/30명), 도시민 귀농학교(2회/55명), 여성 귀농학교(1회/20명), 산야초학교(2회/60명), 지역리더 및 귀농귀촌인 정책설명회(4회/450명), 멘토컨설팅(현장·유선상담 735건)

◦ 주민유대강화 지원 : 귀농귀촌인 재능기부단, 동아리 운영 등

◦ 귀농귀촌인 이사비 지원(100가구 100백만원), 주택수리비 지원(40가구       200백만원), 자녀정착금 11명 5.5백만원, 재능나눔 27백만원

◦ 귀농귀촌 가족실습농장 입주완료 : 10가구

◦ 소규모 삶터 3개소 : 관주도형(대강면), 민주도형(산내 원백일, 주천 고기)

□ 지속가능한 농식품산업 기반확충 및 고부가가치 창출

◦ 농식품기업 맞춤형 지원                   : 1개소, 264백만원

◦ 맞춤형(HACCP) 컨설팅 지원               : 3개소, 16백만원

◦ 전통식품 마케팅·체험시설 지원             : 2개소, 338백만원

◦ 종균활용 발효식품산업 지원                : 1개소, 40백만원

◦ 농식품기업 청년인턴 취업지원              : 2개업체 4명 취업지원

◦ 농식품산업육성 발전계획 수립 용역         : 1식, 50백만원

◦ 춘향애인 어플리케이션 개발                : 1식, 20백만원

◦ 우수경영체 육성으로 6차산업 기반조성      : 1개소, 100백만원

◦ 향토자원 활용한 특화된 농식품경영체 육성  : 6개소, 60백만원

2019년 주요업무 추진실적

농촌활력프로그램(지역역량강화)

□ 개    요

◦ 사 업 비 : 70백만원

◦ 사업마을 : 27개 마을, 11개 프로그램

◦ 사업내용 : 주민이 원하는 농촌활력 프로그램 지원

- 마을단위 전통문화, 공통관심 사업을 통한 주민화합 활동

□ 추진실적

◦ 우리동네 행복 뭐!(미용교실) : 17마을, 20백만원, 연인원 1,360명 참여

◦ 물박놀이 : 사매 노봉마을, 5백만원, 4개월, 단원 25명

- 제6회 생생마을 콘테스트 전라북도 최우수상 수상, 상금 5백만원(7. 4.)

※ 제6회 행복마을 콘테스트 전국대회 출전 예비심사 : 7. 15.

◦ 제6회 행복마을 콘테스트 전국대회 참가(문화복지분야) : 8. 28.

◦ 할매들의 한평 정원 만들기 : 주천면 하주마을, 5백만원, 25명

◦ 하반기 농촌활력프로그램 선정 : 8개 마을, 40백만원, 4개월

- 흥부가 배우기, 건강, 가야고분, 타일벽화, 디딤이, 품바, 물박, 제빵

□ 쟁점 및 대책

◦ 농촌자원·경관, 전통문화 발굴 미흡으로 프로그램 완성도 부족

□ 1마을 1공동체 활력프로그램 정착을 위해 마을별 간담회, 중간지원         조직 현지 컨설팅 강화

□ 금후계획

◦ 하반기 농촌활력프로그램 추진              : ˊ19. 9. ~ 11월

◦ 2020년 생생마을 콘테스트 참가마을 발굴    : ˊ19. 11월

◦ 2020년 농촌활력프로그램 개발              : ˊ19. 12월

행복한 농촌 만들기

□ 개    요

◦ 사 업 비 : 90백만원

◦ 사 업 량 : 농촌경관 사진 공모전, 성공마을 사례 발표회, 마을신문 발간,                  마을만들기 책자 발행, 농촌축제

◦ 사업내용 : 5개 사업

- 농촌경관·자원 사진 공모전 : 남원시 농촌마을 대상

- 마을만들기 사례 발표회 : 14개 마을

- 마을신문 발간 : 12개 마을,   - 마을만들기 책자 발행 : 117개 마을

- 농촌축제 : 제6회 효원이 시집가는 날

□ 추진실적

◦ 농촌경관·자원 사진 공모전 결과 : 124명(274점) 접수, 41점 입상

◦ 마을신문 발행 : 3개 마을(천황봉권역, 갈치, 흥부권역)

◦ 마을사례발표회 마을 확정(14개 마을) 및 사무장 간담회 3회

□ 쟁점 및 대책

◦ 제1회 남원시 농촌자원·경관 사진 공모전 참여대상자 농촌마을 거주자로 제한(동지역 참여 희망)

□ ˊ20년 사진 공모전은 남원시민 전체로 참가 자격 확대 추진

□ 금후계획

◦ 농촌경관·자원 사진 공모전 시상 및 전시회      : ˊ19. 9. ~ 10월

◦ 9개 마을(미 발행마을) 마을신문 발행             : ˊ19. 10월

◦ 제1회 마을만들기 사례 발표회                   : ˊ19. 10월

◦ 농촌축제(효원이 시집가는 날)                    : ˊ19. 11. 2.

생생마을 만들기

□ 개    요

◦ 목    표 : 사람 찾는 농촌마을 구현을 위해 마을 주도의 마을만들기	사업 추진으로 마을 공동체의 활성화 도모

◦ 사 업 비 : 599백만원(국비 129.5, 도지특 100, 도비 67, 시비 272.5, 자부담 30)

◦ 사업내용 : 9개 사업

- 생생마을만들기 3개 사업(142백만원)

․ 기초단계(주민역량강화, 마을경관조성), 사후관리단계(시설 개보수), 산촌마당캠프

- 중간지원조직 구축, 농촌과소화 대응인력 2개 사업(224백만원)

- 농촌체험휴양마을 지원 4개 사업(233백만원)

․ 체험, 화재보험료, 박람회 참가, 사무장활동비, 사무장 역량강화 등

□ 추진실적

◦ 생생마을만들기 기초단계 추진 : 이백 척동마을 등 6개 마을 / 개소당 5백만원

◦ 생생마을만들기 사후관리 : 산내 입석, 인월 달오름 각 25백만원

◦ 생생마을만들기 산촌마당캠프 : 흥부마을 완료

◦ 체험마을 사무장 지원(7개월) : 11개 마을, 114백만원

◦ 체험마을 체험·화재보험료 지원 : 12개 마을, 5백만원

◦ 농촌과소화 : 과소화 32개 마을 이장간담회 2회(소규모 사업, 역량강화)

□ 쟁점 및 대책

◦ 과소화 마을의 리더 부재, 사업 의지 부족으로 간담회 및 현장지도

참여율 낮아 마을 만들기 추진 애로

□ 참여율 제고를 위한 공동체 활성화 프로그램개발 지원

- 건강식당(주 1회), 노인복지센터와 연계한 치유상담 등

□ 금후계획

◦ 생생마을만들기 추진(기초, 사후, 산촌캠프)      : ˊ19. 9. ~ 10월

◦ 2020년 생생마을만들기 대상마을 발굴(10개소)   : ˊ19. 10월

◦ 체험마을 하반기 박람회 참가                   : ˊ19. 11월

농촌 중심지 활성화

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2013 ~ 2021년(계속)

◦ 위    치 : 6개 읍·면[운봉읍(선도지구 1), 일반지구 금지면 등 5지구]

◦ 총사업비 : 36,900백만원(국비 70%, 지방비 30%)

◦ 사업내용

- 운봉읍 : 하늘아래 운봉마루, 작은목욕탕 정비, 서림공원정비 외 3

- 금지면 : 금지누리센터, 금싸라기마을갤러리, 전원마을체험의집 외 4

- 인월면 : 전선지중화, 가로환경정비, 인월행복센터, 다목적 축구장 외 3

- 산내면 : 살래복합문화센터, 상생광장, 게이트볼장, 귀농인의 집 외 3

- 대강면 : 복지회관 리모델링, 대강면 행복마당 조성, 꽃낭구 정원 외 3

- 사매면 : 사매종합복지센터 리모델링, 혼불교육문화센터 조성 외 3

□ 추진실적

◦ [운봉읍] 서림공원 정비완료, 하늘아래운봉마루 공사 10%완료	: ˊ19. 3. ~ 8.

◦ [인월면] 시설공사 준공 및 인월행복센터 준공식	: ˊ19. 6. 8.

◦ [금지면] 금지면 시설공사 99% 완료	: ˊ18. 3. ~ ˊ19. 5.

◦ [산내면] 게이트볼장 주변정리 완료 및 시행계획 도 협의 요청	: ˊ19. 8.

◦ [대강면, 사매면] 기본계획 도 승인 완료	: ˊ19. 8.

□ 쟁점 및 대책

◦ [운봉읍] 하늘아래 운봉마루 신축 사업부지가 현재 5일장이 운영되고 있는 운봉시장내로 신축을 위한 장옥 철거로 인해 상인들이 장옥 내 물건을 반출하는 데 어려움을 호소

□ 공사에 지장이 없는 주차장 부지에 5일장을 위한 몽골텐트 5개를 설치하여 상인 및 주민들의 불편 해소

◦ [금지면] 금지 문화누리센터 내 집기 구입비가 사업비에 반영이 되어 있지 않아 마무리 사업비 부족

□ 추경 시 금지면에서 사업비 15백만원 추경 요구, 예산 반영 필요

◦ [산내면] 농산물 전시판매장 앞 폐도로를 활용한 상생광장 조성사업 예정                이었으나, 사업 부지 내 개인 사유지가 포함되어 사업추진이               어려움

□ 추진위원회 요청에 따라 장항교 근처로 사업 위치 변경하여 추진

◦ [사매면] 사매 기본계획 도 협의 결과, 혼불문화나눔터 사업규모(12,851㎡)가               과다하여 여건 및 관련규정에 맞게 축소 운영 요구

□ 주민 및 추진위원회 의견을 수렴하고 적정 사업규모로 조정하여

사업 시행

□ 금후계획

◦ [인월면] 축구장, 행복센터 등 시설물 인수인계    : ˊ19. 10.

◦ [운봉읍] 하늘아래운봉마루 상가입면정비공사 추진 : ˊ19. 9. ~ ˊ20. 6.

◦ [금지면] 금지 중심지활성화사업 시설물 준공식    : ˊ19. 9. 30.

◦ [산내면] 살래문화센터 착공 및 공사 추진         : ˊ19. 9. ~ ˊ20. 6.

◦ [대강면] 시행계획(실시설계) 시행 및 지역역량강화사업 병행 추진 : ˊ19. 9.

◦ [사매면] 시행계획(실시설계) 시행 및 지역역량강화사업 병행 추진 : ˊ19. 10.

기초생활거점육성

□ 개    요

◦ 필 요 성 : 농촌지역의 거점공간인 면소재지에 교육, 문화, 복지시설 등                  시설 확충을 통해 소재지의 거점기능을 강화하고, 기초서비스                  기능 향상 도모

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2022년(4년)

◦ 위    치 : 아영면 소재지 청계리, 산동면 소재지 태평리 일원

◦ 사 업 비 : 8,000백만원(국비 70%, 지방비 30%) / 개소당 4,000백만원

- 2019년 사업비 : 1,200백만원(국비 840, 지방비 360)

◦ 사업내용

- 아영면 : 아영 행복나눔센터, 문화회관 리모델링, 흥부골 안전 통학길                 정비, 지역역량강화 등

- 산동면 : 산동 문화플랫폼, 아이행복센터, 안전한 통학로 환경개선,

지역역량강화 등

□ 추진실적

◦ 일괄 위(수)탁 계약(남원시↔한국농어촌공사 남원지사)     : ˊ19. 3월

◦ 기초생활거점 육성사업 기본계획 용역 시행중(공정률 20%) : ˊ19. 6월

◦ 추진위원회 구성 및 운영(월 2회)	: ˊ19. 6월 ~

□ 쟁점 및 대책

◦ 당초 계획한 사업부지가 협소하여, 센터 신축 시 2 ~ 3층으로 높아져       이동에 어려움이 있을 것으로 예상되므로 사업 위치변경과 이에 따른       부지 매입 필요

□ 추진위원회와 적정한 사업부지 선정 및 부지 매입에 관한 협의 완료         후, 기본계획에 반영하여 도 협의 후 시행

□ 금후계획

◦ 기본계획 수립 및 고시	: ˊ19. 10월

◦ 실시설계 추진 및 사업 시행(역량강화사업 병행추진)	: ˊ20. 10월

마을만들기(권역개발)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2004 ~ 2019년(15년)

◦ 사 업 량 : 7개 권역, 35,214백만원

(단위 : 백만원)

구 분	완료지구 (6개소)						진행지구 (1개소)
	혼불문학권역	흥부골권역	요천권역	천황봉권역	지리산 둘레권역	공안권역	솔바람권역
위 치	사매면 5개 마을	아영면 7개 마을	이백면 5개 마을	보절면 3개 마을	주천면 4개 마을	운봉읍 8개 마을	덕과면 5개 마을
사업면적	780ha	1,348ha	631ha	1,103ha	1,206㏊	620㏊	532ha
사 업 비	6,009	6,587	4,800	4,900	4,240	4,760	3,918
사업기간	ˊ04~ˊ08년	ˊ07~ˊ11년	ˊ08~ˊ13년	ˊ09~ˊ14년	ˊ12~ˊ16년	ˊ14~ˊ18년	ˊ14~ˊ19년
추진현황	완료	완료	완료	완료	완료	완료	공정률 95%

□ 추진실적

◦ 사업추진 : 1개 권역(덕과 솔바람), 권역단위 완료지구 유지관리

- 2019년도 : 304백만원

․ 솔바람 : 204백만원(역량강화 및 태양광설비 추가 설치)

․ 완료지구 유지관리 보수 시행 3개소(천황봉권역, 요천권역, 흥부골권역)

□ 쟁점 및 대책

◦ 사무장이 없는 곳은 사후관리 단계에서 권역 운영과 활성화에 애로가 있어 체험휴양마을 지정과 사무장 지원이 불가피하나 지원 사업이 도비 보조 사업으로 사업 선정에 어려움

□ 사무장 인건비 등 자체예산을 확보하고 권역 및 체험휴양마을, 사후관리   단계에 있는 마을 등에 사무장을 지원하여 운영 및 활성화 추진

□ 금후계획

◦ 권역단위 완료지역 사후관리 및 현황판 정비공사 시행   : ˊ19. 9월

◦ 솔바람 권역 태양광 설비공사 추가 시행 및 시설물 인수인계  : ˊ19. 10월

마을만들기(마을단위, 자율개발)

□ 개    요

(단위 : 백만원)

구 분	2015~2017 (완료)	2016~2017 (완료)	2017~2018 (완료)	2018~2020 (추진중)	2019~2021 (추진중)
사업비	1,317	2,436	1,500	4,409	5,000
사업량	3개	5개	3개	8개	9개
마을 만들기 (28개소 14,662)	-공동문화·복지 산동부서 441	-공동문화·복지 주생중동 500 금지매촌 466 인월서무 470	-공동문화·복지 주천회덕 500 아영아곡 500	-공동문화·복지 운봉매요 498 아영외인 496 아영두락 500 주천하송 500	-자율개발 수지서당 500 사매수월 500 송동부석 500 송동송내 500 이백효기 500 아영서정 500 사매수동 500 덕과용산 500
	-체험·소득 산내원천 483	-경관·생태 대산왈길 500 아영율동 500	-경관·생태 산동등구 500	-경관·생태 운봉권포 500 사매상신 500 송동두곡 460
	-경관·생태 운봉전촌 393		※산림과 이관 주천내송 산내와운 산내내령	-마을종합 주생대지 955	-마을종합 아영 봉대 1,000

□ 추진실적

◦ 2018년도 시행(8개소)

- 실시설계 완료 및 시설공사 시행중(공정률 70%)	: ˊ19. 3. ~ ˊ19. 8.

- 역량강화사업 추진 중	: ˊ19. 3. ~

◦ 2019년도 시행(9개소)

- 기본계획 수립 중(공정률 90%)                 : ˊ19. 3. ~ ˊ19. 8.

□ 쟁점 및 대책

◦ 사업 완료 후 주민자체 프로그램 운영과 활성화에 애로

□ 사후관리사업을 타이틀로 한 시군역량강화 사업을 공모하여 사후관리   프로그램 운영으로 지속적인 활성화 유지

□ 금후계획

◦ 2018년도 시행(8개소)

- 시설공사 준공 및 사후역량강화사업 추진          : ˊ20. 12.

◦ 2019년도 시행(9개소)

- 기본계획 도 협의	및 시행계획 승인 고시	: ˊ19. 9.

- 실시설계 용역 발주(역량강화병행추진)	: ˊ19. 9.

2020년 일반농산어촌개발 신규(공모)사업

□ 개    요

◦ 2020년 일반농산어촌개발 공모 대상지

(단위 : 백만원)

구 분		2020년 공모사업 대상지				비 고
		대상지구	사업비	국비	지방비
계		13개	18,800	13,160	5,640
기초생활거점		주천면	4,000	2,800	1,200
		보절면	4,000	2,800	1,200
		이백면	4,000	2,800	1,200
시군역량		시군역량강화	300	210	90
마을 만들기	자율개발	운봉 소석	500	350	150	2020년 지방이양사업
		수지 고정	500	350	150
		수지 등동	500	350	150
		주생 정충	500	350	150
		대강 가덕	500	350	150
		보절 진목	500	350	150
		아영 매산	500	350	150
	마을종합	아영 율동	1,000	700	300
농촌다움복원		흥부문화복원	2,000	1,400	600

□ 추진실적

◦ 2020년 공모사업 대상지구 주민설명회 대상지 선정    : ˊ18. 2. ~ 8.

◦ 주민역량강화 및 농촌 현장포럼 진행                 : ˊ18. 3. ~ 11.

◦ 2020년 일반농산어촌개발사업 공모  예비계획서 확정 : ˊ19. 1. 31.

◦ 2020년 일반농산어촌개발사업 공모 신청서 제출      : ˊ19. 2. 11.

◦ 2020년 일반농산어촌개발사업 도 및 중앙평가        : ˊ19. 2. ~ 4.

□ 쟁점 및 대책

◦ 마을만들기, 농촌다움복원사업이 도 및 중앙평가까지 완료된 상황에서       2020년부터 균특 사업비 지방이양으로 분류되어 공모 참여마을 반발 예상

□ 지방이양된 균특 사업비 중 신규사업비를 2020년 공모 마을에 우선 배정

◦ 공모를 위해 준비 중인 마을에 대해 단계별 역량강화에 대한 지속 추진       여부 농식품부와 도 지침(기준) 마련 지연

□ 지방이양에 따라 자체 시행할 경우 경쟁력 강화를 위해 기존 단계별         역량강화 절차를 이행한 마을을 대상으로 신규지구를 선정하여 사업 추진

□ 금후계획

◦ 2021년 일반농산어촌개발사업 대상지구 발굴         : ˊ19. 9.

도시민농촌유치 및 귀농귀촌활성화 지원

□ 개    요

◦ 사 업 비 : 271백만원(균특 75.5, 국비 60, 도비 15, 시비 120.5)

◦ 단계별 주요사업내용

단 계 별	주요 사업내용
관심단계	·귀농귀촌센터 홈페이지 운영, 귀농귀촌 박람회 참가, 도시민 초청 농촌체험, 귀농귀촌학교, 수도권홍보관 운영 ·춘향제 귀농귀촌 홍보부스 운영, 홍보 팸플릿 제작
실행단계	·멘토-멘티 컨설팅, 귀농귀촌 정책설명회 운영 ·농촌 빈집 및 농지정보 제공
정착단계	·지역민과 함께하는 실용교육, 마을단위 융화교육 운영 ·귀농인의 집 조성 및 입주 지원 ·귀농 창업자금, 주택구입(신축)자금 융자 지원
관리단계	·주민유대강화 : 마을환영회, 재능기부단, 귀농귀촌인의 날 등 ·읍면 귀농귀촌 중간조직 간담회, 동아리활동, 선진지견학 등

□ 추진실적

◦ 귀농귀촌활성화 및 안정적인 정착지원을 위한 조례 개정 : ˊ19. 4월

◦ 남원시 귀농귀촌종합지원센터 지정 승인                : ˊ19. 4월

◦ 귀농귀촌 초기 안정적 정착 유도를 위한 지원정책 추진

- 상·하반기 귀농 농업창업 및 주택구입 지원대상자 선정 및 자금

배정(31가구 6,680백만원)

◦ 도시민을 대상으로 찾아가는 홍보활동, 농촌체험활동 연계교육 실시

- 홍보분야 : 서울 수도권홍보관 운영(2회/80명), 전라북도 귀농귀촌 상담홍보전 참가(2회/150명), 춘향제 귀농귀촌 홍보 및 상담부스 운영, 전북도 귀농귀촌 지자체설명회 참가(1회/30명), 홍보팸플릿 제작

- 교육분야 : 도시민 초청 농촌체험(1회/30명), 도시민 귀농학교(2회/55명), 여성 귀농학교(1회/20명), 산야초학교(2회/60명), 지역리더 및 귀농귀촌인 정책설명회(4회/450명), 멘토컨설팅(현장ㆍ유선상담 735건)

- 주민유대강화 지원 : 귀농귀촌인 재능기부단(sns마케팅 활용, 프롭테라피, 사랑나눔 봉사단) 운영, 동아리 운영(산야초, 청년, 족구, 볼링 등)

□ 금후계획

◦ 귀농인의집 조성 추진(산동 목동)	: ˊ19. 9. ~ 10월

- 신규지구 1개소 선정 및 추진(9월)

◦ 전라북도 귀농귀촌 상담홍보전(광주·서울) 박람회 참가 : ˊ19. 9. ~ 10월

◦ 발효학교 운영 및 지자체 귀농귀촌 설명회(서울) 참가   : ˊ19. 10월중

◦ 귀농귀촌인의 날 운영                                : ˊ19. 11월중

소규모 삶터 조성지원

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 농촌지역

◦ 사 업 비 : 500백만원(시비 500)

◦ 사 업 량 : 관주도형 1지구, 민주도형 2지구

◦ 사업내용 : 귀농귀촌인 거주 기반시설 조성(상하수도, 배수, 단지 내 포장, 가로등 설치 등)

□ 추진실적

◦ 2012년 이후부터 현재까지 22개 지구 150가구 조성완료

◦ 2019년 민주도형 2개 지구 실시설계실시(산내 원백일, 주천 고기리)

◦ 2019년 관주도형 대강 방산지구 공유재산 관리계획 신청 : ˊ19. 7.

□ 쟁점 및 대책

◦ 민주도형의 경우 사업신청 부진

□ 기 조성된 민간택지개발 사업장 중 지원 가능한 시설 검토

◦ 관주도형 소규모 삶터 지속적인 추진 필요

□ 읍면동 사업대상지 후보 조사를 통한 연차적 시행 추진

□ 금후계획

◦ 관주도형 소규모 삶터 토지보상 협의     : ˊ19. 9. ~

◦ 민주도형 소규모 삶터 공사 추진 및 완료 : ˊ19. 9. ~ 12.

귀농귀촌인 유입 및 안정적 정착 지원

□ 귀농귀촌인 유입실적

◦ 2019년 유치 목표 : 500가구

◦ 귀농귀촌인 유입실적(ˊ19. 7월말) : 406가구 580명(목표대비 139% 증가)

□ 개    요

◦ 귀농귀촌인 이사비 지원

- 사 업 비 : 100백만원(시비 100%)

- 지원내용 : 타시군에서 농촌지역 전입 후, 1년 이내 신청 시 세대당

1백만원 정액 지원

◦ 귀농귀촌인 주택수리비 지원

- 사 업 비 : 200백만원(시비 100%)

- 지원내용 : 타시군에서 농촌지역 전입 후, 5년 이내 신청 시 5백만원

한도 내 주택수리비 지원

◦ 귀농귀촌인 자녀정착금 지원

- 사 업 비 : 30백만원(시비 100%)

- 지원내용 : 귀농귀촌인 자녀가 관내 초·중·고등학교에 재학 중일 경우                   자녀 1명당 0.5백만원 지원

◦ 농촌 재능나눔 활동 지원

- 사업대상 : (사)한생명, 적십자가온누리, 신바람체조봉사단, 춘향예술단

- 사 업 비 : 27백만원(국비 18.9, 시비 8.1)

□ 추진실적

◦ 귀농귀촌인 이사비·주택수리비 확대지원을 위한 지침개정  : ˊ19. 1. 23.

◦ 귀농귀촌인 이사비 지원     : 100가구, 100백만원

◦ 귀농귀촌인 주택수리비 지원 : 41가구, 199백만원

◦ 귀농귀촌인 자녀정착금 지원 : 12명, 6백만원

□ 금후계획

◦ 귀농귀촌인 이사비 및 주택수리비 2회 추경예산 확보 추진

귀농귀촌 가족실습농장 조성

□ 개    요

◦ 위    치 : 주생면 상동리 102-2번지 일원

◦ 사 업 비 : 2,165백만원(국비 963, 시비 1,202)

◦ 사업규모 : 주택 10호, 공동창고 1개소, 실습농장(3,300㎡), 게스트하우스(게스트룸 2, 사무실, 다목적실)

□ 추진실적

◦ 귀농귀촌 가족실습농장 도 공모사업 선정	: ˊ16. 9.

◦ 추진계획 수립 및 주민의견수렴	: ˊ17. 3. ~ 6.

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: ˊ17. 9. 28. ~ ˊ18. 5. 4.

◦ 전라북도 도 원가심사 의뢰 및 결과통보	: ˊ18. 6. 19. ~ 7. 13.

◦ 공사착공	: ˊ18. 9. 6.

◦ 입주자 모집 공고	: ˊ19. 5. 8. ~ 6. 5.

◦ 입주자 선정	: ˊ19. 6. 12.

◦ 공사준공	: ˊ19. 6. 13.

◦ 내부 집기물품 설치 및 입주	: ˊ19. 7. ~ 8.

□ 쟁점 및 대책

◦ 주변지역 조경시설, 건물내부 시설보강 등 추가공사 필요

□ 제2회 추가경정예산에 반영하여 하반기 공사 실시

□ 금후계획

◦ 조경시설 등 하반기 보완공사 추진	: ˊ19. 9. ~ 11.

◦ 실습농장 토양관리 및 작물재배 기술지도(기술센터 협조)

◦ 입주자 주택신축 및 농지확보 정보제공 등 지속 지원

농식품 가공산업 육성 및 고부가가치 창출

□ 개    요

(단위 : 백만원)

분 야 별	사 업 명	개소 (명)	사 업 비
			계	국비	도비	시비	자부담
계	8개 사업	13	910	419	11	260	220
농식품기업 지원	농식품기업맞춤형지원	1	264	132		53	79
	맞춤형(HACCP)컨설팅지원	3	16	8		4	4
전통식품 육성	전통식품체험시설지원	1	300	150		60	90
	전통식품마케팅활성화 지원	1	38	19		8	11
	종균활용 발효식품지원	1	40	20		20
농식품기업 ․ 청년일자리창출	농식품기업청년인턴취업지원	4	182	90	11	45	36
지속가능한 농식품산업 육성	농식품산업 육성 연구용역	1	50			50
	공동브랜드 춘향애인 응용형 개발	1	20			20

□ 추진실적

◦ 맞춤형(HACCP) 컨설팅 지원 : 2개소(8백만원) → 3개소(16백만원)

◦ 신규 식품 HACCP 인증 : 3개소(한국식품안전관리인증원)

◦ 종균활용 발효식품 지원 사업 1차 정산보고 : ˊ19. 8. 1.

◦ 농식품산업 발전 수립 연구용역 자료 수집 및 의견수렴 : 5회

- 행정, 지역농협, 농식품가공업체, 품목별 협의체, 작목반 등 방문

◦ 공동브랜드“춘향애인”응용형으로 개발된 디자인 전문가 평가조사 : 8. 5. ~ 8. 9.

◦ ˊ20년 맞춤형지원사업 등 사업신청 수요조사  : ˊ19. 7. ~ 8월

◦ 체험시설 및 맞춤형 지원사업 입찰 및 계약   : ˊ19. 8월말

□ 쟁점 및 대책

◦ 지역 농산물 소비확대 및 농가소득과 연계된 지속가능한 농식품산업 육성

□ 추진 중인「농식품산업 발전계획 수립」연구용역 완성도를 높이고,         농업상황을 잘 활용하여 체계적인 농식품산업 방향성을 정립, 실현         가능한 정책 개발

□ 농식품의 품질향상과 가공·제조시설 현대화, HACCP 미인증업체         대상으로 농식품기업 경쟁력을 높일 수 있는 맞춤형 지원 사업 등         공모 추진

□ 금후계획

◦ 농식품 분야(부각) 심포지엄 개최      : ˊ19. 9월말

◦ 체험시설 및 맞춤형 지원사업 완료    : ˊ19. 12월

농촌융복합(6차) 산업화

□ 개    요

구 분	개소	사업비					비고
		계	국비	도비	시비	자부담
계	7	160	50	30	38	42
소규모 6차 산업화 지원	1	100	50		20	30
마을경영체 경쟁력 강화	6	60		30	18	12

□ 추진실적

◦ 향토자원 활용한 특화된 농식품경영체 육성

- 마을경영체 경쟁력 강화사업 : 6개소, 60백만원

◦ 우수경영체 육성으로 6차산업 활성화 지원

- 수요자 중심 소규모 6차 산업화 지원 : 1개소, 100백만원

◦ 농촌융복합산업 인증(6차) 인증사업자 : 19개소 → 20개소

◦ 농림축산식품부 주관 우수농촌체험공간 공모 신청 : 4개소

- 동편제마을, ㈜레드 등 체험인프라가 우수한 마을 및 농장 추천

□ 쟁점 및 대책

◦ 지역 농산물을 주원료로 사용하는 제조·가공 농식품업체 지원으로       농가소득과 연계된 농식품 6차산업화 육성

□ ˊ20년 「향토자원산업화 신규사업」등을 공모하여 현장 맞춤형 지원         모델을 발굴하고, 마을상품의 고부가가치화를 통한 농가 소득 증대         및 자생력 강화

□ 금후계획

◦ ˊ20년 수요자중심 소규모 6차산업화사업 공모 신청 : ˊ19. 9월

◦ 6차산업 핵심 경영체 중점 육성 : 연중

◦ 농촌융복합산업 후보군 품목 육성