2019. 9.

2019년 주요업무 추진실적

건   설   과

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2019년 주 요 업 무  결산

□ 2019년 주요업무 추진실적

◦ 2019~2020 도로 설해 대책

◦ 도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 변경 용역

◦ 읍면지역 안전한 도로망 확충 정비

◦ 읍면지역 시도 확포장

◦ 농어촌도로 확포장

◦ 통행불편 마을 진입로 정비

◦ 도로 유지관리사업

◦ 지방하천 정비사업

◦ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업

◦ 소하천정비 종합계획 재수립 용역

◦ 소하천 정비사업

◦ 요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성

◦ 하천 유지관리사업

◦ 하천 유지관리사업(신규/보조)

일  반  현  황

□ 기    구

											건 설 과 장
											진 영 신
건설행정담당										도로담당														하천담당
이 재 우										성 길 경														백 강 규
설해대책추진 도로 유지 관리․보수 도로 점‧사용 허가 국‧공유 재산관리 노점상‧과적 단속										읍면시도 확․포장사업 농어촌도로 확․포장사업 기업유치 기반시설 확충사업 통행불편 도로사업 도로 유지 관리사업														치 수 사 업 하천유지관리 육상골재채취․허가 공유수면관리 하천점․사용허가

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	38	1	3	7	4	4	□청원경찰 : 2 □공 무 직 : 17
현 원	35	1	5	4	4	3	□청원경찰 : 1 □공 무 직 : 17 - 휴직(1) 포함
증 감	△3	-	2	△3	-	△1	△1

□ 도로 현황

(단위 : km)

구 분	노선수	총연장	포 장	포장률(%)	비 고
계	841	1,387.7	754.1	54.3
고 속 국 도	2	69.0	69.0	100.0
국 도	5	123.8	123.8	100.0
국가지원지방도	2	47.7	47.7	100.0	전북 98.2%
지 방 도	7	120.2	107.0	89.0	전북 79.2%
시 도	472	174.4	95.4	54.7	전북 67.8%
읍면지역시도	22	215.1	130.6	60.7	전북 54.9%
농 어 촌 도	331	637.5	180.6	28.3	전북 34.3%

□ 하천 현황

(단위 : km)

구 분	개소	하천연장	개수현황(양안)			개수율 (%)	비 고
			계	개 수	미개수
계	389	675.4	1,181.6	815.4	366.2	69.0
국가하천	2	39.1	40.1	40.1		100.0
지 방 하 천	40	246.7	392.9	317.4	75.5	80.8	전북 78.5%
소 하 천	347	389.6	748.6	457.9	290.7	61.2	전북 36.5%

2019년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 시민 교통편의 및 지역 균형발전을 위한 도로 개설 ◦ 지방재정확충을 위한 국가예산확보에 총력 ◦ 소하천 정비사업 총사업비 변경 승인 - 당동소하천 정비사업 (승인일 : `19. 7. 29.) [당초 7,401백만원 ➛ 변경 10,711백만원 (증 3,310백만원)] ◦ 지방하천 정비사업 추진(4개 지구) - 풍천 지방하천 정비사업 착수 : L=4.62km / 2019~2022년 / 22,936백만원 - 송치천 지방하천 정비사업(3차분) : L=2.04km / 2020년 준공예정 / 9,466백만원 - 원천천·다산천 실시설계 추진 : 2019년 내 공사 착수 목표로 추진 ◦ 요천 수변관광자원화 사업 도비 확보 - 총사업비 : 9,300백만원[도비 4,300(동부권특별회계), 시비 5,000] - 사업내용 : 음악분수 L=42m, 바닥분수 2개소 및 광장, 물놀이시설 A=1,170㎡

□ 지역 균형발전을 위한 도로 개설 – 31개 지구 / 29.02km / 11,775백만원

◦ 읍면지역시도 확포장	: 4개 지구 / L=8.00㎞ / 2,900백만원

◦ 농어촌도로 확포장	: 6개 지구 / L=10.38㎞ / 2,700백만원

◦ 통행불편 마을진입로	: 14개 지구 / L=7.92㎞ / 4,030백만원

◦ 위험도로 선형개량	: 7개 지구 / L=2.72㎞ / 2,145백만원

□ 지방재정 확충을 위한 국가예산 확보 – 1,718백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비 (국비+균특)	도 비 (도비+조정교부)	시 비	비 고
계	3,361	215	1,503	1,643
도 로	1,315	215	510	590
하 천	2,046		993	1053

◦ 도  로 : 6개 사업 / 725백만원

- 수지 호곡 위험도로(균 40), 동림교 교통사고 잦은 곳(국 35), 교량 정밀        안전점검(도 60), 도용선(특‧조 300), 주생 소지 회전교차로(특‧조 150),        고죽교차로 회전교차로(국 140)

◦ 하  천 : 6개 사업 / 993백만원

- 대강 사석 2소하천(특‧조 20), 아영 일대천(도 320), 인월 도장천(도 40),        아영 청계천(특‧조 200), 요천(식정동)(도 300), 이백 백암천(도 113)

◦ 국도‧국지도 건설 5개년 계획(`21~`25) 건의사업(9개) 중 5개 사업 반영 대응

- 국도 24호(이백~운봉), 국도 19호(산동~장수 번암), 국지도 60호(주천 호경~고기),        국지도 60호(곡성 고달~주천), 국지도 37호(인월~아영)

□ 안전하고 쾌적한 도로 유지관리 – 76개소 / 6,744백만원

◦ 읍면지역시도 유지관리사업 추진	: 18개소 / 1,021백만원

◦ 농어촌도로 유지관리사업 추진	: 19개소 / 1,329백만원

◦ 법정도로 유지관리사업 추진	: 39개소 / 4,394백만원

□ 재해 사전예방을 위한 하천 정비 – 84개소 / 18,608백만원

◦ 하천 정비(지방하천, 소하천)	: 8개소  / 12,866백만원

◦ 원천천 하천정비 및 친수공간조성	: 1개소  /  2,400백만원

◦ 하천 하도준설	: 45개소 /    743백만원

◦ 하천 호안 및 제방 정비 추진	: 30개소 /  1,396백만원

◦ 수해복구사업	: 1식     /  1,203백만원

2019년 주요업무 추진실적

2019~2020 도로 설해대책

□ 개    요

◦ 운영 기간 : 2019. 11. 15. ~ 2020. 3. 15.(4개월간)

◦ 제설 대상 : 법정관리도로 총 57개 노선 431.5km

계		시 관리국도		지 방 도		시 도		읍면시도(군도)
노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량
57	431.5	3	25.1	8	154.9	24	38.5	22	213

◦ 제설 인력 : 25명(도로보수원 10, 운전원 10, 상황실 5)

◦ 제설 차량 : 13대〔15톤 6(임차3), 5톤 2(임차1), 1톤 4(임차2), 굴삭기1〕

◦ 제설 장비 : 246대

- 자체 보유 : 제설기  12대(15톤용 6/ 5톤용 1/ 1톤용 5)

살포기  12대(15톤용 6/ 5톤용 1/ 1톤용 5)

- 읍면동(19) : 제설기 222대(트랙터용 219/ 1톤용 3)

◦ 제설 자재 : 염화칼슘 110톤 / 소금 1,390톤 / 친환경 제설제 496톤

◦ 상황실 운영 : 건설과(2개조 5명), 각 읍면동사무소

□ 추진실적

◦ 도로제설작업 추진(9회)	:`18. 11. ~ `19. 3.

- 대설주의보 1회, 한파주의보 3회, 누적적설량 : 7.9㎝ (평균 0.8㎝)

- 투입장비 : 12대〔15톤 5(임차3), 5톤 2(임차1), 1톤 4(임차2), 굴삭기 1〕

◦ 제설자재 구입(염화칼슘 65톤, 소금 800톤)	: 1월

◦ 읍면동 트랙터용 제설기 10대 보급	: 2월

□ 금후계획

◦ 읍면동 트랙터용 제설기 30대 보급	: `19. 10.

◦ 미끄럼주의표지판(22개) 및 모래주머니(20,000매) 설치	: `19. 11.

◦ 임차장비 용역시행(15톤 3대, 5톤 1대, 1톤 2대)	: `19. 11.

◦ 상황실[건설과(2개조 5명), 읍면동] 운영	: `19. 11. ~ `20. 3.

◦ 설해대책을 위한 제설장비 대기	: `19. 11. ~ `20. 3.

도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 변경 용역

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 읍․면 지역

◦ 사 업 량 : 읍면지역시도 및 농어촌도로 353개 노선 L=852.6㎞

◦ 사 업 비 : 500백만원(시비)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2019년(2개년)

◦ 도급업체 : ㈜수성엔지니어링(경남 창원), ㈜성원기술개발(전북 김제)

□ 추진실적

◦ 기본계획 변경 용역 수행	: `18. 4. ~

- 시군도 및 농어촌도로 각 노선별 현장조사(연장, 도로폭, 시설물 조사 등)

◦ 기본계획 변경 용역 1차 검토(군도 노선)	: `18. 10.

◦ 농어촌도로 전략환경영향평가 / 사전재해영향성검토 용역 착수 : `18. 11.

◦ 도로건설계획, 농어촌도로 기본계획(변경) 협조요청(읍․면․동) : `19. 5. ~ 8.

< 노선 검토 주요 방향 >

◦ 군도 : 도로 개설 실효성 검토, 상위도로로 인한 단절구간 연결(중복결정)

◦ 농어촌도로 : 읍면 의견 수렴에 따른 노선 지정, 마을 주 진입도로

일제 노선 반영, 격하된 군도 노선 신규 지정

< 검토내용 >

(단위 : km)

구 분	당 초		변 경		증 △감
	노선 수	연장	노선 수	연장	노선 수	연장
합 계	353	852.6	384	854.2	31	1.6
군 도	22	215.1	21	168.6	△ 1	△ 46.5
농어촌도로	331	637.5	363	685.6	32	48.1

□ 금후계획

◦ 군도 및 농어촌도로 개선(안) 의견 수렴              : `19.  9.

◦ 용역 보고회 개최	: `19.  9.

◦ 전략환경영향평가 및 사전재해영향성검토 용역 수행  : `19.  9. ~ 11.

◦ 도로건설 관리계획 수립 및 농어촌도로 변경 고시    : `19. 12.

읍면지역 안전한 도로망 확충 정비

□ 개    요

◦ 사업규모 : 도로정비사업 31개 지구, L=29.02㎞

◦ 총사업비 : 59,970백만원 (2019 : 11,775백만원)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2022년(6개년)

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 량		총사업비	기투자	2019	2020이후	사업기간
계	31개지구	L=29.02㎞	59,970	11,800	11,775	36,095
읍면지역시도	4개지구	L=8.0㎞	22,200	2,300	2,900	17,000	`17~`22
농어촌도로	6개지구	L=10.38㎞	19,450	4,500	2,700	12,250	`17~`22
통행불편	14개지구	L=7.92㎞	12,670	3,600	4,030	5,040	`17~`20
위험도로 선형개선	7개지구	L=2.72㎞	5,650	1,400	2,145	1,805	`17~`21

□ 추진실적

◦ 읍면지역시도 : 공사 중(부석~오촌, 오리정~상신), 설계 중(평촌~강기, 도산~서매)

◦ 농어촌도로 : 완공(장항교), 공사 중[행덕선, 도용선, 상황선, 배촌선(중송)]

설계 중(배촌선, 견두선)

◦ 통행불편 : 공사 중(사매 화정, 아영 신지, 보절 내황, 금지 방촌, 이백 계산, 대강 대치,

덕과 배산, 송동 신기, 대산 안대실, 인월 중군, 주천 제바위)

설계 중(이백 오산길, 인월 장평, 덕과 수촌)

◦ 위험도로 : 완공(주천 가송), 공사 중(군도29, 주생 상동, 운봉 방현, 아영 율동,

주천 가송), 설계중(수지 남창, 수지 호곡)

□ 금후계획

◦ 읍면지역시도 : 공사 추진(평촌~강기,부석~오촌,오리정~상신), 설계용역(도산~서매)

◦ 농어촌도로 : 공사 완공(행덕선), 공사 추진(상황선, 배촌선(중송), 도용선),

설계용역 추진(견두선, 배촌선)

◦ 통행불편 : 공사 완공(아영 신지, 덕과 배산, 사매 화정, 이백 계산, 대강 대치,

금지 방촌), 공사추진(인월 중군, 보절 내황, 대산 안대실, 송동 신기,

주천 제바위), 설계용역(덕과 수촌, 이백 오산길, 인월 장평)

◦ 위험도로 : 공사 완공(주생 상동, 운봉 방현, 아영 율동), 공사 추진(군도 29,

수지 남창), 설계용역(수지 호곡)

읍면지역 시도 확포장

□ 개    요

◦ 계    획 : 19개 사업 / 36.46㎞ / 71,130백만원

◦ 기 투 자 : 15개 사업 / 28.46㎞ / 48,930백만원

◦ 시 행 중 :  4개 사업 /  8.00㎞ / 22,200백만원(※ 2019 : 2,900백만원)

- `20 완공 : 1개 지구, `21 완공 : 1개 지구, `22 완공 : 2개 지구

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2022년(17개년)

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2019	2020이후
합 계	4개사업	8.00	22,200	2,300	2,900	17,000	23.4
부석~오촌	송동면	2.60	5,900	900	700	4,300	27	`17 ~ `21
오리정~상신	사매면	1.00	2,300	400	800	1,100	52	`17 ~ `20
평촌~강기	이백면	2.50	11,000	1,000	1,000	9,000	18	`17 ~ `22
도산~서매	주생면	1.90	3,000		400	2,600	13	`19 ~ `22

□ 추진실적

◦ 부석~오촌(20%)	: 1차분 추진(토공) / 용지보상 추진(재감정 평가)

◦ 오리정~상신(50%)	: 1차분 준공(토공), 2차분 추진(배수공, 구조물공)

◦ 평촌~강기(5%)	: 주민설명회 6차 및 실시설계 보완용역 추진

◦ 도산~서매(2%)	: 실시설계용역 추진 / 2차 주민설명회

□ 금후계획

◦ 2020년 완료       : 1개 사업(오리정~상신)

◦ 2021년 완료       : 1개 사업(부석~오촌)

◦ 2022년 완료       : 2개 사업(평촌~강기, 도산~서매)

농어촌도로 확포장

□ 개    요

◦ 계    획 : 22개 사업 / 26.24㎞ / 46,874백만원

◦ 기 투 자 : 16개 사업 / 15.86㎞ / 27,424백만원

◦ 2019시행 :  6개 사업 / 10.38㎞ / 19,450백만원(※ 2019 : 2,700백만원)

- `19 완공 : 2개 지구, `20 완공 : 2개 지구, `21 완공 : 1개 지구, `22 완공 1개 지구

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2023년(18개년)

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2019	2020이후
합 계	6개사업	10.38	19,450	4,500	2,700	12,250	37
배촌선	주천면	3.56	5,500		400	5,100	7	‘19 ~ ‘21
장항교 재가설	산내면	0.30	2,600	2,300	300		100	‘17 ~ ‘19
도용선	주생면	0.67	1,650	300	700	650	61	‘17 ~ ‘20
상황선	산내면	0.60	2,100	50	1,000	1,050	50	‘18 ~ ‘20
견두선	수지면	4.00	6,000	250	300	5,450	9	‘18 ~ ‘22
행덕선	운봉읍	1.25	1,600	1,600			100	‘17 ~ ‘19

□ 추진실적

◦ 배 촌 선	: 실시설계용역 추진(공정 30%), 배촌선(중송) 착공(8.12.)

◦ 장항교 재가설 : 교량 개통 및 준공(6.25.)

◦ 도 용 선	: 용지보상(50%), 1차분 준공(6.20.)

◦ 상 황 선      : 공사 착공(8.19.)

◦ 견 두 선	: 실시설계용역 추진(노선 확정)

◦ 행 덕 선      : 2차분 공사 추진(60%)

□ 금후계획

◦ 2019년 완료   : 2개 사업(장항교 재가설, 행덕선)

◦ 2020년 완료   : 2개 사업(도용선, 상황선)

◦ 2021년 완료   : 1개 사업(배촌선)

◦ 2022년 완료   : 1개 사업(견두선)

통행불편 마을 진입로 정비

□ 개    요

◦ 계    획 : 49개 사업 / 28.67㎞ / 24,886백만원

◦ 기 투 자 : 35개 사업 / 20.75㎞ / 12,216백만원

◦ 2019시행 : 14개 사업 /  7.92㎞ / 12,670백만원(※ 2019 : 4,030백만원)

- `19 완공 : 8개 지구, `20 완공 : 6개 지구

◦ 사업기간 : 2008 ~ 2020년(13개년)

□ 추진실적

◦ 실시설계 : 3지구

- 이백 오산길, 인월 장평, 덕과 수촌

◦ 공사 착공  : 3지구

- 송동 신기, 인월 중군, 주천 제바위

◦ 공 사 중 : 8지구

- 사매 화정, 대산 안대실, 아영 신지, 보절 내황, 금지 방촌, 이백 계산,

대강 대치, 덕과 배산

□ 금후계획

◦ 2019년 완료 : 8개 사업

- 아영 신지, 덕과 배산, 사매 화정, 이백 계산, 대강 대치, 금지 방촌,

인월 중군, 덕과 수촌

◦ 2020년 완료 : 6개 사업

- 보절 내황, 송동 신기, 이백 오산길, 대산 안대실, 인월 장평, 주천 제바위

□ 통행불편 마을 진입로 정비사업 세부내역

사 업 명	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	추진실적	계획
		계	기투자	2019	2020 이후
14개 사업	7.92	12,670	3,600	4,030	5,040	60
인월 중군마을 (‘17~’19)	0.78	1,550	950	600		100	공사 착공	-1공구 : 시공 및 준공 -2공구 실시설계, 주민설명회
아영 신지마을 (‘17~’19)	0.31	1,200	900	300		100	시공,용지보상	시공 및 준공
보절 내황마을 (‘17~’20)	1.04	1,620	400	700	520	25	시공,용지보상	시공, 용지보상
덕과 배산마을 (‘18~’19)	0.45	600	50	550		100	시공	시공 및 준공
대산 안대실마을 (‘18~’20)	0.46	1,800	50	600	1,150	36	실시설계, 착공	시공, 용지보상
사매 화정마을 (’19) 신규	0.23	300		300		100	시공	시공 및 준공
송동 신기마을 (’19~`20) 신규	0.47	500		100	400	20	착공	시공, 용지보상
이백 오산길 (’19~20) 신규	0.78	850		300	550	35	실시설계	실시설계, 공사발주
인월 장평마을 (’19~20) 신규	0.50	1,800		80	1,720	4	실시설계	실시설계, 공사발주
덕과 수촌마을 (’19) 신규	0.15	200		200		100	실시설계	용지보상, 공사발주
주천 제바위마을 (’19~20) 신규	0.65	1,000		300	700	30	실시설계	시공, 용지보상
이백 계산마을 (’17~‘19)	0.31	450	450			100	시공	시공 및 준공
대강 대치마을 (’18~‘19)	0.29	400	400			100	시공	시공 및 준공
금지 방촌마을 (’18~‘19)	1.50	400	400			100	시공	시공 및 준공

위험도로 선형 개선

□ 개    요

사 업 명	읍면	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2019	2020이후
합 계	7개사업	2.72	5,650	1,400	2,145	2,105	63
군도29호선 (지리산IC~아영면사무소)	아영면	1.3	1,600	450	850	300	81	‘17 ~ ‘20
주생 상동	주생면	0.37	650	500	150		100	‘17 ~ ‘19
운봉 방현(북천)	운봉읍	0.14	400	50	350		100	`18 ~ `19
아영 율동	아영면	0.14	300	50	250		100	`18 ~ `19
수지 남창	수지면	0.15	500	50	450		100	`18 ~ `19
주천 가송	주천면	0.22	300	300			100	`18 ~ `19
수지 호곡	수지면	0.40	1,900		95	1,805	5	`19 ~ `21

□ 추진실적

◦ 군도29호선(아영) : 1․2차분 공사 추진 / 20%

◦ 주생 상동	: 1공구 준공(6.10.) 2공구 공사추진(5%)

◦ 운봉 방현(북천)  : 공사 추진(15%)

◦ 아영 율동	: 공사 추진(80%)

◦ 수지 남창	: 실시설계용역 착수(7.18.)

◦ 주천 가송	: 준공(8.20.)

◦ 수지 호곡       : 위험도로 구조개선사업(행안부) 국비 40백만원 확보,

실시설계용역 착수(7.16.)

□ 금후계획

◦ 2019년 완료      : 4개 사업 [주생  상동, 운봉  방현(북천), 아영 율동, 주천 가송]

◦ 2020년 완료      : 2개 사업[군도 29호선(지리산IC~아영면), 수지 남창]

◦ 2021년 완료      : 1개 사업(수지 호곡)

도로 유지관리사업

□ 개    요

◦ 총사업비 : 12,273백만원(국비 175, 조 150, 도비 60, 시비 11,888)

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비(백만원)	비 고
합 계		20개소	12,273
읍면지역시도	관 내	5개소	1,533
농어촌도로	관 내	6개소	2,370
법정도로 유지관리	관 내	9개소	8,370

□ 추진실적 – 76개 지구 / 6,744백만원

▸ 읍면지역시도 유지관리

◦ 산동 상신마을 아스콘 덧씌우기 외 17개소 1,021백만원 추진 중

▸ 농어촌도로 유지관리

◦ 이백면 내동삼거리 도로정비공사 외 18개소 1,329백만원 추진 중

▸ 법정도로 유지관리

◦ 승사교~동림교 재포장공사 외 38개소 4,394백만원 추진 중

□ 금후계획

◦ 읍면지역시도·농어촌도로·법정도로 유지관리 추진  : `19. 9. ~ 12.

◦ 아스콘 재포장, 과속방지턱, 교량(터널)유지관리, 배수개선, 시설물 정비 등

◦ 공사 추진 : 공정·품질·안전관리 / 견실시공 만전

- 주생면 소지교차로 회전교차로사업	: `19. 9. ~ `19. 12.

- 사매 용북중학교 및 인월농공단지 인도정비공사	: `19. 9. ~ `19. 12.

- 고죽교차로~갈치교차로 도로확포장공사	: `19. 9. ~ `20.  6.

□ 도로 유지관리사업 세부내역

사 업 명		사업위치	사업량	사업비 (백만원)	추 진
합 계			20개소	12,273
읍면지역시도 유지관리			5개소	1,533
	시도유지관리	관내	유지관리사업 1식	600	10월 완공
	백암2교 개선공사	관내	교차로개선 1식	100	10월 완공
	산동 석동마을	산동면	진출입로 개설 L=0.2㎞	50	10월 완공
	주민참여예산	관내	유지관리사업 6개소	483	12월 완공
	대강 양촌 진입로 정비	대강면	진입로 정비 L = 105m	300	8월 완료
농어촌도로 유지관리			6개소	2,370
	농어촌도로 유지관리	관내	유지관리사업 1식	600	10월 완공
	사매 용북중학교 인도	사매면	인도설치 L=720m	720	11월 완공
	이백 효촌마을 재포장	이백면	아스콘 재포장 L=700m	400	9월 완공
	이백 내동마을 재포장	이백면	아스콘 재포장 L=400m	100	6월 완료
	주천 회덕마을 세월교	주천면	교량 재가설 L=260m	250	‘20.6. 완공
	인월 농공단지 인도개설	인월면	인도개설 L=0.42㎞, B=2m	300	9월 완공
법정도로 유지관리			9개소	8,370
	교량터널유지관리	관내	법정교량(터널) 정비 등	도 60 시 1,020	10월 완공
	도로유지관리	관내	유지관리사업 1식	640	10월 완공
	법정도로 재포장	관내	아스콘 재포장 L=11.4km	3,100	9월 완공
	고죽~갈치 교차로 확포장공사	고죽동	회전교차로 1개소 확포장 L=0.63m, B=25m	국 140 시 1,140	‘20.6. 완공
	동림교 사거리 개선공사	죽항동	교통시설개선 1식	국 35 시 35	6월 완료
	춘향교 인도정비 및 택지지구 정비	도통동	인도포장 L=0.15㎞ 도로측구보수 L=0.7㎞	600	9월 완공
	걷고싶은 거리 조성	노암, 어현동	인도유지보수 L=3.9㎞	900	9월 완공
	백공산4가 ~ 남원I.C 화단형 분리대 설치	월락동	화단형 중앙분리대 설치 L=260m	400	10월 완공
	주생 소지교차로 설치공사	주생면	회전교차로 1식	조 150 시 150	10월 완공

지방하천 정비사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 아영면 풍천 외 3개소

◦ 사업기간 : 2012 ~ 2022년 (11개년)

◦ 총 계 획 : 21개 지구 / 98.43㎞ / 190,771백만원

- 완료지구 : 13개 지구 / 45.05㎞ / 105,918백만원

(송내천, 내척천, 괴양천, 진기천, 백암천, 운교천, 풍천, 요천, 수외천, 수지천, 주촌천, 갈치천, 람천)

- `19년 사업 : 4개 지구 / 7,662백만원〔국비 3,831, 도비 1,532, 시비 2,299〕

하천별	지구별	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2019	2020이후
합 계	4개하천	23.87	77,528	19,384	7,662	50,482	35
풍 천	소 계	5.53	37,351	13,284	2,724	21,343	42	`14 ~ `22
	청계지구	0.88	6,961	6,961			100	`17년준공
	풍천지구	4.65	30,390	6,323	2,724	21,343	30	`18 ~ `22
송치천	주천송치	2.04	9,466	3,500	2,298	3,668	62	`16 ~ `20
원천천	신촌~주천	14.6	23,139	1,800	2,400	18,939	18	`17 ~ `22
다산천	덕과만도	1.7	7,572	800	240	6,532	14	`18 ~ `22

※ 지방하천(2개소)『익산지방국토관리청』실시설계(2차) 협의 추진 상황

┍ 원천천 : 당초(MP) 18,821백만원 ⇨ 설계금액23,139백만원(증 4,318 / 증23%)

┕ 다산천 : 당초(MP)  4,554백만원 ⇨ 설계금액 7,572백만원(증 3,018 / 증66%)

□ 추진실적

◦ 풍  천(인월·두락·의지) : 1차분 시행(두락지지구 L=1.2km) 교량 2개소 등 / 공정률 20%

◦ 송치천 : 교량 2개소, 낙차공, 토지보상 병행 협의      / 공정률 75%

◦ 원천천 : 실시설계 용역 추진[익산청(2차), 도 지방건설기술심의] / 공정률 10%

◦ 다산천 : 실시설계 용역 추진[익산청(2차) 협의 추진]   / 공정률 10%

□ 금후계획

◦ 풍  천 □ 인월지구 편입용지 보상	: `19.  9월

□  공사 추진	: `19.  9월 ~ `22. 12월

◦ 송치천 : 3차분 공사 추진	: `19.  9월 ~ `19. 12월

◦ 원천천 □ 지방건설기술심의 및 총사업비 변경승인 : `19.  9월

□ 조달청 원가심사 및 공사 발주    : `19. 11월

◦ 다산천 □ 실시설계 완료 및 총사업비 변경승인 : `19.  9월

□ 조달청 원가심사 및 공사 발주    : `19. 10월

원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도통동 인도교 ~ 주천면 고기리 일원

◦ 사 업 량 : 관광자원화 친수공간 조성 L=14.6㎞

- 축제 4.1km, 자전거길 6.8㎞, 보․낙차공 12개소, 교량 9개소 등

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2022년(6개년)

◦ 총사업비 : 23,139백만원〔국 11,570(50%), 도 4,628(20%), 시 6,941(30%)〕

※ `19년도 사업비 : 2,400백만원

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진(총용역비 1,245백만원) : `16. 9. 28. ~ `19. 6. 30.

◦ 착수보고회 및 자문위원 사업설명회 개최	: `16. 10. 21.

◦ 기본 및 실시설계(안) 확정	: `18.  5.  3.

◦ 용역 중간보고회 개최(시장)	: `18.  8.  3.

◦ 실시설계(안) 총사업비 변경 협의(1차) / 익산청  : `19.  5.  2.

◦ 설계적정성 검토(VE) 용역 완료	: `19.  5.  3.

◦ 환경영향평가(초안) 주민설명회 개최            : `19.  6. 12.

◦ 문화재 현상변경 협의 요청(문화재청)           : `19.  7.  8.

◦ 실시설계(안) 총사업비 변경 협의(2차) / 익산청  : `19.  7. 18.

- 사업비 : 당초 MP상 18,821백만원 → 23,139백만원(증4,318)

□ 금후계획

◦ 건설기술심의(전북도)                          : `19.  9월

◦ 총사업비승인 협의절차 이행(익산청 3차)        : `19.  9월

◦ 조달청 공사발주 및 사업 추진	: `19. 11월

소하천정비 종합계획 재수립 용역

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 관내 소하천 347개소(L=389.6㎞)에 대한 종합계획 재수립

◦ 총사업비 : 5,837백만원(시비 100%)

◦ 용역기간 : 2015 ~ 2019년(5개년)

◦ 용역대상 : 347개소 / L=389.6㎞를 2개 권역으로 분할 용역 발주 추진

◦ 법적근거 : 소하천정비법 제6조(소하천정비종합계획의 수립) 및 같은법 수행규칙 제3조

(단위 : 백만원)

권 역 별	사업량	총사업비	투자	용역기간
합 계	347개소/L=389.6㎞	5,837	5,837	`15 ~ `19
섬진강 권역	272개소/L=292.4㎞	3,572	3,572	‘15 ~ ‘19
낙동강 권역	75개소/L=97.2㎞	1,315	1,315	‘16 ~ ‘19
전략환경평가	전구간	950	950	‘17 ~ ‘19

□ 추진실적

◦ 소하천정비종합계획 재수립용역 시행

- 섬진강 수계 : `15. 7. 31 - 낙동강 수계 : `16. 4. 15 - 전략환경영향평가 : `17. 9. 20.

◦ 소하천 중복지정 관리기관 협의(한국농어촌공사 남원지사)  : `15. 10. / `18. 11.

◦ 기초 소하천관리위원회 심의	: `19.  5. 27. ~ 6. 10.

◦ 전략환경영향평가(본안) 협의(전북지방환경청)	: `19.  6. 20.

《소하천 지정(신규․폐지․조정)(안)》

수 계	당 초		변 경		증 ․ 감(△) 연장(km)	증 ․ 감(△)률 연장(%)	비 고
	개소	연장(km)	개소	연장(km)
합 계	349	392.1	311	386.3	△5.8	△1.5	∘폐지:59개소 ∘신규:21개소
섬진강	274	294.9	240	291.4	△3.5	△1.2	∘폐지:53개소 ∘신규:19개소
낙동강	75	97.2	71	94.9	△2.3	△2.4	∘폐지: 6개소 ∘신규: 2개소

□ 금후계획

◦ 전라북도 관련실과 협의	: `19.  8월

◦ 광역 소하천관리위원회(전북도) 심의	: `19.  9월

◦ 소하천대장 전산화 및 지형도면고시, 사업완료	: `19. 11월

소하천 정비사업

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 30개 지구 / 20.78㎞ / 44,511백만원

- 완료지구 : 6개 지구 /  4.31㎞ / 13,417백만원

(뒤하천, 율치천, 율정천, 아곡천, 신동천, 장교천)

- `19년 사업 : 5개 지구 / 8.7km / 7,604백만원〔국비 1,552 (20%), 시비 6,052 (80%)〕

◦ 위    치 : 수지면 고평천 외 4개소

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2022년(7개년)

구분	지구별	위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
				계	기투자	2019	2020이후
합 계		5개 하천	8.70	23,421	3,012	7,604	12,805	45
보조	소계	3개 하천	7.35	20,321	3,012	4,504	12,805	37
	고평천	수지 고평	2.30	7,745	2,692	2,332	2,721	65	‘16~‘20
	당동천	아영 봉대	3.40	10,711	320	1,800	8,591	20	‘18~‘22
	오롱골천	운봉 주촌	1.65	1,865		372	1,493	20	‘19~‘20
자체	소계	2개 하천	0.85	3,100		3,100		100
	천사천	월락동	0.35	1,600		1,600		100	‘19~‘20
	양선천	덕과 신양	1.00	1,500		1,500		100	‘19~‘20

□ 추진실적

◦ 고평천   □ 1·2·3차분 준공	: `17.  5. 10. ~ `18. 12. 19.

□ 4차분 착공 (공정 65%)	: `19.  3.  7. ~ `19. 11.  1.

◦ 당동천   □ 실시설계 용역 착수	: `18.  2. 21. ~ `19.  9. 30.

–  중앙사전설계검토 및 총사업비 변경 승인	: `19.  7. 29.

□  원가심사 및 조달발주 의뢰(조달청)	: `19.  8.  5.

◦ 오롱골천 □ 실시설계 용역 착수	: `19.  2. 27. ~ `19. 10. 30.

□  측량 및 수리검토, 주민설명회 완료	: `19.  3.  1. ~ `19.   6. 30.

◦ 천사천, 양선천 – 편입용지 보상 및 공사 추진	: `19.  7.     ~ `20. 11.

□ 금후계획

◦ 고평천   – 4차분 공사 추진	: `19.  3. ~ 11.

◦ 당동천   – 편입용지 보상 및 공사 추진	: `19.  7. ~ `22. 12.

◦ 오롱골천 □ 실시설계 용역 추진	: `19.  2. ~ 10.

–  사전설계검토 및 원가심사(전북도)	: `19.  9. ~ 10.

□  편입용지 보상 및 공사 추진	: `19. 11. ~ `20. 11.

◦ 천사천, 양선천 – 편입용지 보상 및 공사 추진	: `19.  7. ~ `20. 11.

요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성

<요천 수변 관광 자원화 사업>

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 어현동 741번지 일원/ 요천 국가하천[천변 친수지구]

◦ 사 업 량 : 물놀이 분수광장 조성

- 음악분수 L=42m, 바닥분수 2개소 및 광장, 물놀이시설 A=1,170㎡

구 분	사업비 (백만원)	사업 규모	비고
합 계	9,300
음악분수	3,500	∘ 음악분수 L=42m, H=30m
물놀이시설	800	∘ 바닥분수 2개소
	950	∘ 기계 및 전기시설(정화시스템 등)
	160	∘ 휴게, 복지시설, 물놀이장 놀이시설 1식
	1,680	∘ 석재포장(광장, 도로)A=4,000㎡
	2,010	∘ 구조물(수조, 제어실, 물놀이장)
소 계	5,600
설계비	200	∘ 실시설계 1식

◦ 총공사비 : 9,300백만원[도비 4,300(동부권특별회계), 시비 5,000]

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2020년(4개년)

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: `17. 10월 ~

◦ 시의회 선진지 벤치마킹(김해 연지공원/ 전남 광양서천)     : `18. 2. 26. ~ 28.

◦ 사업계획 변경 추진보고(의회, 시장)             : `18. 11월

□ 당초 : 수경시설(분수) / 중앙저수로 ⇨ 변경 : 물놀이 분수광장 / 고수부지

◦ 선진지 벤치마킹(3회 추진)                   : `18. 12. 12. ~

◦ 음악분수 공법선정 심의 완료                 : `19.  6. 17.

◦ 2019년 지방재정투자심의 완료(전북도)         : `19.  6. 28.

□ 금후계획

◦ 조달청 원가심사 및 공사발주 의뢰            : `19.  9월

◦ 공사 착공 및 준공                           : `19. 10월 ~ `20. 5월

◦ 음악분수 및 물놀이 분수광장 운영            : `20.  6월 ~

하천 유지관리사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 소하천·지방하천·국가하천 일원

◦ 사 업 량 : 3개 사업 / L =80.3km

◦ 사 업 비 : 3,982백만원 (국비 976, 도비 48, 시비 2,958)

◦ 사업기간 : 2019년

구 분	사업내용	사업량 (km)	사업비 (백만원)	집행액 (백만원)	집행률	비고
합 계	3개 사업	80.3	3,982	2,550	64.03
하천유지관리사업	하천 유지관리	15.0	1,070	1,056	98.6
	하천 하도준설	20.0	1,400	743	53.1
	주민참여예산	3.1	440	340	77.3
기성제유지관리사업	지방하천 기성제 정비	2.3	96	66	68.7
국가하천유지보수사업	섬진강, 요천 유지관리	39.9	976	345	35.3

□ 추진실적

【 하천 및 기성제 유지관리사업 】

◦ 하천유지관리사업 추진	: `19. 1. ~

- 하도준설 이백면 백암천 외 44개소(L=20.0km) 중 26개소 완료(L=12.78km) 및 19개소 추진 중

- 유지관리 대산면 신촌천 외 21개소(L=3.78km) 중 16개소 완료(L=0.99km) 및 6개소 추진 중

◦ 시특법 관리대상 배수통문 정밀점검 용역 완료(율천)	: `19. 7. 5.

◦ 하반기 하천 유지관리사업 대상지 제출 및 현지조사	: `19. 8. ~

【 국가하천 유지보수사업 】

◦ 시특법 관리대상 배수통문 정밀점검 및 성능평가 용역 완료(요천)	: `19. 7. 5.

◦ 국가하천 시특법 2종 시설물 보수공사 추진(15개소)	: `19. 8. 1. ~

□ 금후계획

【 하천 및 기성제 유지관리사업 】

◦ 하반기 하천유지관리사업 추진	: `19. 9. ~ 11.

【 국가하천 유지보수사업 】

◦ 섬진강·요천 보수 대상지 조사 및 공사 추진	: 연중 수시

하천 유지관리사업(신규/보조)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 소하천·지방하천 일원

◦ 사 업 량 : 6개 사업 / L =1.57km

◦ 사 업 비 : 2,046백만원(특조 220, 도비 773, 시비 1,053)

◦ 사업기간 : 2019년

구 분	사업내용	사업량 (km)	사업비(백만원)
			계	특조	도비	시비
합 계	6개 사업	1.57	2,046	220	773	1,053
하천 유지관리사업 (보조)	대강 사석 2소하천 제방정비사업	0.02	20	20
	일대천 재해위험시설 정비사업	0.70	800		320	480
	도장천 재해위험시설 정비사업	0.10	100		40	60
	청계천 소교량(아영중학교) 재가설공사	1식	300	200		100
기성제 유지관리사업 (보조)	요천 지방하천 제방정비사업	0.35	600		300	300
	백암천 지방하천 유지보수사업	0.40	226		113	113

□ 추진실적

◦ 사업계획서 제출 및 특별조정교부금 및 도비 송금 : `19. 2. 8. ~ 6. 18.

◦ 유지관리사업 실시설계 용역 추진	: `19. 4. ~ 9월 말

< 세부추진상황 >

- 사석2소하천 : 실시설계 용역 및 공사 준공

- 일대천 : 측량 및 수리 검토, 주민설명회 완료

- 도장천 : 실시설계 용역 및 일상감사 완료

- 청계천 : 실시설계 용역 및 원가심사 완료

- 요  천, 백암천 : 실시설계 용역 추진 중

◦ 2019 제2회 추경 시비 확보 추진	: `19. 8월 ~

□ 금후계획

◦ 행정절차 이행(전북도 원가심사 등) 및 추경 예산 확보 : `19.  9월 ~

◦ 하천유지관리 및 기성제 유지관리 공사 추진     : `19. 10월 ~ 12월