2019. 9.

2019년 주요업무 추진실적

환경사업소

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2019년 주 요 업 무  결산

□ 2019년 주요업무 추진실적

◦ 강우시 하수관리 시범사업

◦ 노후하수관로 정비사업

◦ 남원[3단계] 하수관로 정비사업

◦ 소규모 마을하수처리시설 설치사업

◦ 소규모 마을하수처리시설 개량사업

◦ 하수슬러지 처리시설 관리대행 추진

◦ 소규모 마을하수처리시설 기능개선 및 완벽한 생활하수 관리

◦ 요천생태습지공원 사랑받는 공원 조성

◦ 달궁·반선 소규모 마을하수처리시설 미세목 자동스크린 설치

◦ 공공하수도 시설 관리대행 추진

일  반  현  황

□ 기    구

									환경사업소장
									강 인 식
하수경영담당					하수시설담당								하수처리담당										마을하수담당
박 병 준					강 자 청								양 병 우										문 하 성
∘행정종합계획수립 ∘회계․시설물 관리 ∘공기업 특별회계 운영 ∘생태습지공원 관리					∘하수도 중장기계획 수립 및 추진 ∘하수관거정비, 마을하수도 사업 시행 및 유지관리								∘남원하수처리장 운영 ∘분뇨처리시설 운영 ∘하수슬러지 처리시설 관리·감독										∘운봉․인월 하수 처리장 운영 관리 ∘소규모하수처리시설 운영 관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	25	1	4	5	8	7
현 원	23	1	8	6	5	3	청 경 2 환경관리원 3 공 무 직 4
증 감	△2	-	4	1	△3	△4

□ 하수처리시설 현황

◦ 총 64개소 (500㎥/일 이상 3개소, 500㎥/일 미만 61개소)

구 분	시설용량(㎥/일)	처리방법	비 고
남원하수처리장	50,000	심바이오공법
운봉하수처리장	800	회분식활성슬러지공법
인월하수처리장	1,000	회분식활성슬러지공법
소규모하수처리장	4,143	질소인고도처리 외 17개 공법	61개소

1. 남원 하수처리장 현황

구 분	최 초	1차 증설	2차 증설
시설용량(㎥/일)	50,000	50,000	50,000
처리방법	표준활성슬러지법	심바이오	인제거장치
준공일자	1995.11.4.	2009.11.30.	2012.6.30.
부지면적(㎡)	34,980	36,505	36,505

2 운봉·인월 하수처리장 현황

구 분	운봉하수처리장	인월하수처리장
시설용량(㎥/일)	800	1,000
처리방법	회분식활성슬러지공법	회분식활성슬러지공법
준공일자	2006.5.30.	2006.5.30.
부지면적(㎡)	3,735	3,616

□ 요천생태습지공원 현황

위치	조성규모	준공일자	주요시설
주생면 중동리 1297	145,298㎡	2014.12.1.	생태탐방로, 야구장, 다목적구장, 애견놀이터, 모정 등

2019년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 강우시 하수관리 시범사업(차집관로, 남원[2단계] 하수관로) 본격 추진 ◦ 공공하수도시설 관리대행을 위한 타당성 검토 추진 ◦ 요천생태습지공원 지속적인 시설 정비

□ 하수도시설 지속적인 확충 및 유지관리

◦ 강우시 하수관리 시범사업 추진

- 하수관로(차집관로, 2단계 하수관로) 정비사업 본격 추진

◦ 소규모 마을하수처리시설 설치사업 추진

- 금지 용전·사매 서도지구

◦ 노후 소규모 마을하수처리시설 개량사업 추진

- 와운·권포·양평·방촌 하수처리시설

◦ 하수처리시설 기술진단을 통한 시설 유지관리 추진

- 남원공공하수처리시설, 분뇨처리시설, 소규모 하수처리시설 3개소(달궁, 덕동, 학천) 기술진단 완료

- 소규모 하수처리시설 2개소(반선, 신파) 기술진단 추진중

□ 하수처리 노후시설물 개선 및 최적운영으로 청정하천 수질보전

◦ 하수처리시설 방류수 수질기준 준수

- 처리상태 : BOD 1.9㎎/L, SS 3.8㎎/L, T-N 12.275㎎/L, T-P 0.063㎎/L

(법적기준 : BOD 5㎎/L, SS 10㎎/L, T-N 20㎎/L, T-P 0.3㎎/L)

□ 하수처리장과 연계한 생태습지공원 운영·관리

◦ 방문자 현황 : 11,890명

- 생태습지공원 : 10,301명, 애견놀이터(2018년 : 15,170명)

- 애견놀이터 : 1,589명, 1,520마리(2018년 : 1,101명, 925마리)

◦ 요천생태습지공원 수목 식재, 쉼터조성, 야구장 복토, 대형주차장 설치 완료

◦ 요천생태습지공원 잡초제거 및 환경정비로 쾌적한 휴식공간 제공

2019년 주요업무 추진실적

강우시 하수관리 시범사업

□ 개    요

구 분		차집관로 정비사업		남원(2단계) 하수관로 정비사업
위 치		➢ 남원시 일원(8개 하천)		➢ 남원시 일원(6개 지역)
사 업 량		➢ 차집관로 정비 L=31km		➢ 하수관로 정비 L=57km ➢ 배수설비 2,900여 가구
총사업비		➢ 42,000백만원(국29,400, 시12,600) ➢ 기투자:25,185 `19년:6,725 ‘19년까지 투자실적 ⇒ 76%		➢ 28,000백만원(국19,600, 시8,400) ➢ 기투자:17,364 `19년:1,062 ‘19년까지 투자실적 ⇒ 66%
사업기간		➢ 2015~2020(6개년)		➢ 2015~2020(6개년)

□ 추진실적

◦ 시범사업 대상 선정	: 2015. 02.

◦ 한국환경공단 위·수탁 협약 체결	: 2015. 03.

◦ 하수도정비기본계획(변경) 수립	: 2016. 05. ~ 07.

◦ 실시설계 완료	: 2018. 08.

◦ 공사착공	: 2018. 10.

◦ 공정률 25%	: 2019. 08월 현재

(차집 : 31km 중 10km 완료, 2단계 : 57km 중 22km 완료, 배수설비 : 2,880가구 중 804가구 완료)

□ 쟁점 및 대책

◦ 타 공사(도시과, 전북도시가스)와 병행시공 시 상호 일정조율이 쉽지       않아 현장관리(포장시기 등)에 어려움이 있음

□ 지속적인 업무 협의를 통한 현장관리 및 병행구간 우선 시행

□ 금후계획

◦ 공사추진	: 2020. 12월까지

노후하수관로 정비사업

◦ 노후하수관로 정밀진단(2016. 04.) 결과에 따른 정비로 도로함몰 등 안전사고에 선제적 대응

◦ 1993년 조성된 도통1택지는 당시 기 분류식화 되었으나 오접과 노후화로

금회 배수설비 정비계획 수립

◦ 동 시기에 수행하고 있는 「강우시 하수도정비 시범사업」과의 사업 경계를 명확히 구분하여 중복투자 방지

□ 개    요

◦ 사업위치 : 남원시 일원(시청주변 / 택지 1지구 일원)

◦ 사업내용 : 노후하수관로 정비 L=5.6km, 배수설비 300여 가구

◦ 사 업 비 : 8,226백만원(국비 3,224, 시비 5,002)

※ 2019년 사업비 : 5,286백만원(국비 2,393, 시비 2,893) - 배수설비 시비 500 포함

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2021년(5개년)

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: 2017. 02. ~ 11.

◦ 환경부 재원협의 등 행정절차 이행	: 2018. 05. ~ 2019. 07.

□ 쟁점 및 대책

◦ 환경부 노후하수관로 정비사업 기준이 2018년 12월 확정됨에 따라        사업물량 재 산정으로 재원협의 및 실시설계가 늦어짐

□ 환경부 기준에 맞춰 실시설계 추진 및 재원협의 완료(2019. 08월)

□ 금후계획

◦ 공사발주 및 시행	: 2019. 09월 ~

남원[3단계] 하수관로 정비사업

◦ 하수량 과다발생 예방을 위하여 시가지 강우시 합류식 지역 및 운봉권 처리구역 내에서 이송되는 불명수 유입 방지 등 하수처리 운영비용 절감과 노후하수관로 정비 병행시행으로 안전한 하수시설을 확보하기 위함

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원처리구역 및 운봉처리구역

◦ 사업내용

- 남원처리구역 : 오수관로 설치 L=31.7km, 배수설비 2,281가구

- 운봉처리구역 : 오수관로 설치 및 개량 L=15.2km

◦ 사 업 비 : 27,200백만원(국비 19,040, 시비 8,160)

※ 2019년 사업비 : 2,625백만원(국비 1,838, 시비 787)

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2020년(4개년)

□ 추진실적

◦ 2018년 신규사업지구로 확정 내시	: 2017. 11.

◦ 기본 및 실시설계 용역시행	: 2017. 11. ~ 2018. 12.

◦ 설계 경제성검토(VE)용역 완료              : 2019. 05.

◦ 전라북도 건설기술심의 완료                : 2019. 08.

□ 쟁점 및 대책

◦ 하수관로 정비사업이 시내 전역에서 동시다발적으로 추진되어 각종       민원 및 행정절차 이행 등 업무가중으로 감독수행에 어려움이 있음

□ 전문 인력의 감독 수행 ⇒ 건설사업 관리(감리용역)

□ 금후계획

◦ 재원협의 및 원가심사	: 2019. 09월까지

◦ 공사발주 및 착공	: 2019. 10월 이후

소규모 마을하수처리시설 설치사업

□ 개    요

사 업 명	사업기간	사업량	총사업비
계		하수관로 L=15.74km 처리시설 2개소	14,783백만원 (국 10,348, 시 4,435)
용전지구 마을하수처리시설 설치사업	2016 ~ 2020	하수관로 L=11.4km 처리시설 Q=200㎥/일	11,474백만원 (국 8,032, 시 3,442)
서도지구 마을하수처리시설 설치사업	2017 ~ 2020	하수관로 L=4.34km 처리시설 Q=100㎥/일	3,309백만원 (국 2,316, 시 993)

□ 추진실적

◦ [용전지구] 기본 및 실시설계용역 준공	: 2018. 05.

◦ [용전지구] 오수관로 공사 착공                   : 2018. 06.

- 공정률 54%, 관로 11.4km 중 6.3km 완료

◦ [서도지구] 기본 및 실시설계용역 준공	: 2018. 12.

◦ [서도지구] 오수관로 공사 착공	: 2019. 03.

- 공정률 18%, 관로 4.3km 중 1km 완료

□ 금후계획

◦ [용전지구] 하수처리시설 공사 착공	: 2019. 10.

◦ [용전지구] 공사 준공	: 2020. 12월까지

◦ [서도지구] 하수처리시설 공사 착공	: 2019. 10.

◦ [서도지구] 공사 준공	: 2020. 12월까지

소규모 마을하수처리시설 개량사업

□ 개    요

처리장명	사업기간	사업량	총사업비
계		4개소 개량	3,355백만원 (국 794, 시 2,561)
권포, 와운	2017~2019	권포 Q=50㎥/일 와운 Q=30㎥/일	1,615백만원 (국 380, 시 1,235)
양평	2018~2019	Q=50㎥/일	1,000백만원 (국 300, 시 700)
방촌	2019	Q=60㎥/일	740백만원 (국 114, 시 626)

□ 추진실적

◦ [권포,와운] 개량사업 인가 및 재원협의	: 2018. 09. 14.

◦ [권포,와운] 공사 착공	: 2018. 12.

◦ [양평] 소규모 하수처리시설 기본․실시설계	: 2018. 03. 08. ~

◦ [양평] 하수처리시설 인가신청 및 재원협의	: 2019. 06. 25.

◦ [방촌] 소규모 하수처리시설 기본․실시설계	: 2019. 02. ~

□ 금후계획

◦ [권포,와운] 처리시설 공사 준공	: 2019. 12.

◦ [양평] 처리시설 착공 및 준공	: 2019. 11. ~ 2020. 10.

◦ [방촌] 하수처리시설 공법선정	: 2019. 10.

◦ [방촌] 인가신청 및 재원협의	: 2019. 11.

◦ [방촌] 공사착공 및 준공	: 2020. 01. ~ 12.

하수슬러지 처리시설 관리대행 추진

□ 개    요

◦ 사 업 명 : 하수슬러지 처리시설 관리대행

◦ 대행업체 : (유)일토씨엔엠, ㈜티에스케이워터

◦ 대행기간 : 2015. 07. ~ 2019. 12. (4년 6개월)

◦ 대행비용 : 1,676백만원/년 (2019년도)

◦ 대행내용 : 하수슬러지 처리시설 운영, 유지관리 등

□ 추진실적

< 위탁관리 성과 >

◦ 가동일수 139일/7월말, 평균 하수찌꺼기(탈수케익) 처리량 28.7톤/일

- 시설용량(30톤/일) 대비 96% 처리

◦ 탄화된 하수찌꺼기(탄화물) 발생량 354톤/7월말

- 유기성 고형연료로 한국중부발전 보령화학에 공급되어 재활용(판매단가 10,000원/톤)

□ 금후계획

◦ 2019년 관리대행 성과평가	: 2019. 09.

◦ 관리대행비 원가산정 용역	: 2019. 10.

◦ 사업수행능력 평가 및 업체 선정	: 2019. 12.

- 소규모 마을하수처리시설 -

기능개선 및 완벽한 생활하수 관리

□ 개    요

◦ 주요시설 : 소규모 마을하수처리장 61개소

◦ 사 업 비 : 698백만원

◦ 사업기간 : 2019. 01. ~ 12. (연중)

◦ 사업내용 : 61개소 마을하수처리장 시설물 개선 및 유지관리

□ 추진실적

◦ 소규모 하수처리시설 중장기 관리계획 하수도기본계획 반영

- 소규모 마을하수처리장 2020년까지 관로연결(14개소)

◦ 낙동강수계 소규모 마을하수시설 기술진단 실시	: 5개소

- 대    상 : 산내면, 보절면

- 진단비용 : 52백만원

- 진단완료 : 2019. 03. 14. ~ 08. 13. (5개월)

◦ 달궁·반선 처리시설 미세목 스크린 설치               : 2개소

◦ 마을하수시설물 유지관리 준설, 미생물 식종 등 시설 개선 : 45건

□ 금후계획

◦ 마을하수처리시설 운영 및 집중관리(61개소)	: 2019. 01. ~ 12.

◦ 마을하수처리시설 반선 외 1개소 기술진단 준공	: 2019. 05. ~ 09.

◦ 마을하수처리시설 원격감시제어 설비 설치	: 2019. 09. ~ 11.

(소규모 마을하수처리시설 30개소, 중계펌프장 9개소)

요천생태습지공원 사랑받는 공원 조성

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2019. 02. ~ 12.

◦ 총사업비 : 446백만원

◦ 사업내용 : 생태습지공원 시설 설치·보강 및 운영

- 쉼터(모정, 음수대) 및 대형주차장 조성, 초본류 식재, 사후 모니터링 용역 등

□ 추진실적

◦ 방문자 현황

- 생태습지공원 : 10,301명(2018년 : 15,170명)

- 애견놀이터 : 1,589명, 1,520마리(2018년 : 1,101명, 925마리)

◦ CCTV 등 접지보강 및 서지보호기 설치	: 2019. 02. ~ 03.

◦ 모정 등 쉼터조성(모정 및 파고라 설치 11개소)	: 2019. 04. ~ 07.

◦ 주차장 설치(대형8면, 소형 11면)	: 2019. 04. ~ 07.

◦ 야구장 복토(16톤)	: 2019. 05. ~ 06.

◦ 수목 식재공사(느티나무 15주, 팽나무 35주)	: 2019. 04. ~ 05.

◦ 사후 모니터링 용역(수질 및 수생태계)	: 2019. 02. ~ 12.

□ 쟁점 및 대책

◦ 느티나무, 은행나무, 팽나무 등 식재된 수목의 잦은 고사

□ 방문자 편의 및 그늘 쉼터를 위한 추가 수목식재 필요

◦ 애견놀이터의 일과시간 전후 이용자 증가 및 이용시간 조정 요구

□ 기간제 근무자 1명 추가 배치 및 06시부터 20시까지 연장 운영

□ 금후계획

◦ 안전사고 예방 및 시설물 보호 회전형 CCTV 설치	: 2019. 08. ~ 09.

- 모정주변 등 3대

◦ 태양광 가로등 설치	: 2019. 09. ~ 12

달궁·반선 소규모 마을하수처리시설

미세목 자동스크린 설치

□ 개    요

◦ 필 요 성 : 유입하수 내 협잡물 분리선별을 통한 수질개선 및 법적

방류수질 준수

◦ 사업기간 : 2019. 01. ~ 09. (9개월)

◦ 총사업비 : 2개소 100백만원(시비) [1개소 50백만원]

◦ 위    치 : 산내면 덕동리 산107-6 외 1개소

‣ 2개소 [달궁·반선 하수처리시설]

◦ 사업규모 : 미세목 자동스크린 2식

◦ 사업내용 : 미세목 자동스크린 신규 설치

□ 추진실적

◦ 실시설계 실시	: 2019. 03.

◦ 조달구매 요청	: 2019. 04.

◦ 업체선정 및 스크린 설치	: 2019. 08.

□ 금후계획

◦ 스크린 시운전	: 2019. 09.

공공하수도 시설 관리대행 추진

□ 개    요

◦ 필 요 성

- 운영관리 인력 부족 및 잦은 인사이동으로 인한 전문성 저하

- 소규모 마을하수처리시설별 처리공법 다양화로 인한 관리 어려움

- 환경기초시설 민간대행 및 위탁관리 전환 추세

◦ 위탁일시 : 2020. 01. ~

◦ 시설현황

구 분	개소	처리용량 (㎥/일)	중계펌프장	수질관리	비 고
계	63	5,943	51개소
운봉하수처리장	1	800	2개소	수질자동측정기 (TMS)	관리인력 : 2인
인월하수처리장	1	1,000	4개소	수질자동측정기 (TMS)
소규모 마을하수처리시설	61	4,143	45개소	현장 채수	관리인력 : 4인

□ 추진실적

◦ 하수도시설 관리대해 타당성 조사 용역 실시	: 2019. 02. ~ 05.

- 시설운영비 및 단순관리대행, 복합관리대행 방안 등 검토

◦ 타지자체 소규모 마을하수처리시설 운영관리 견학	: 2019. 05.

□ 금후계획

◦ 관리대행업자 선정위원회 구성 및 관리대행 계획 수립	: 2019. 09.

◦ 관리대행 기술제안서 제출 공고	: 2019. 09.

◦ 관리대행 업체 선정	: 2019. 10.