2019. 9.

2019년 주요업무 추진실적

상수도사업소

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2019년 주 요 업 무  결산

□ 2019년 주요업무 추진실적

◦ 상수도 공기업의 건전재정 구축

◦ 마을상수도 정비사업

◦ 광역상수도 마을권 사업

◦ 농어촌 생활용수 개발사업

◦ 노후상수관 교체공사

◦ 누수다발지역 개선공사

◦ 월락정수장 개량사업

일  반  현  황

□ 기    구

									상수도사업소장
									강 병 훈
수도경영담당					급수담당							수도시설담당									누수방지담당
임 성 민					이 현 석							안 용 운									김 오 진
∘상수도 공기업 경영 ∘특별회계 재정운영 ∘상수도 사용료 검침 및 요금부과 징수					∘광역상수도 마을권 급수 공사 ∘마을상수도 시설 관리 ∘개인 급수공사							∘상수도 중장기 계획 수립 ∘월락정수장 개량 ∘광역상수도 수수사업 ∘정수장 및 배수지 운영 관리 ∘상수원 보호구역 관리									∘상수도 관망 유지 관리 ∘노후 급·배수관 교체 ∘노후 계량기 시설 개량 ∘누수관로 복구

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	23	1	5	6	4	7	11
현 원	22	1	9	5	5	2	(청경 2, 공무 9)
증 감	△1	-	4	△1	1	△5

□ 2019년 예산규모 : 28,252백만원

				＜2019예 산 >			(단위 : 백만원)
	구 분		2019년		2018년			증 감(%)
	합 계		28,252		21,278			6,974(32.8%)
	일반회계		9,114		6,136			2,978(48.5%)
	특별회계		19,138		15,142			3,996(26.4%)

▷ 2019년 특별회계 : 19,138백만원

					＜세 입＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2019년		2018년			증 감(%)
	합 계			19,138		15,142			3,996(26.4%)
	자체수입			8,311		7,525			786(10.4%)
	의존수입		국 비	3,127		2,617			510(19.5%)
			지원금	7,700		5,000			2,700(54%)

					＜ 세 출 ＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2019년		2018년			증 감(%)
	합 계			19,138		15,142			3,996(26.4%)
	사업비		소계	13,343		9,824			3,519(35.8%)
			투자사업	11,054		7,997			3,057(38.2%)
			경상사업	2,289		1,827			462(25.3%)
	비사업		소계	5,795		5,318			477(8.9%)
			행정운영	5,355		5,087			268(5.3%)
			예 비 비	440		231			△209(△90.5%)

※ 행정운영 : 인건비 + 기본경비 + 광역정수비

□ 급수 현황

(`18. 12. 31. 기준)

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급률 (%)	1인1일 급수량(ℓ)	평균생산량 (㎥/일)	유수율 (%)
82,554	75,822	91.8	360	27,287	75.4

□ 수도시설 현황

◦ 생 산 시 설 : 39,800㎥/일(월락정수장 15,000 / 광역상수도 24,800)

◦ 상수도 관로 : 1,029㎞(도수․송수․배수관 542, 급수관 487)

◦ 배  수  지 : 9개소(27,250㎥)

◦ 가  압  장 : 30개소(무인자동제어 28개소)

◦ 검침급수전 : 27,693전

□ 상수원 보호구역 현황

◦ 위    치 : 월락․도통․신촌․고죽동, 이백면

◦ 지정면적 : 414,525㎡

◦ 지 정 일 : 1985. 12. 24.(0.418㎢) → 2008. 12. 12.(0.414㎢)

□ 마을상수도 현황

시설수 (개소)	규 모 별		급수인구	비 고
	마을상수도	소규모급수시설
82	51	31	3,157세대 6,291명	□소규모 급수시설 : 20㎥/일 미만 □마을상수도 - 20㎥/일 이상 500㎥/일 이하

□ 상수도 관로                                  (단위:m)

구분	총연장	재 질 별				매설연한별			비고
		금속	PE.PVC	내충격수도관	기타	20년미만	20~29년	30년이상
계	1,029,596	243,617	200,172	555,637	30,170	904,721	46,794	78,081
도수관	100				100	100
송수관	15,226	9,840	1,930	2,707	749	12,223	2,254	749
배수관	526,578	233,093	3,203	269,470	20,812	494,387	14,380	17,811
급수관	487,692	684	195,039	283,460	8,509	398,011	30,160	59,521

2019년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 농어촌생활용수 개발사업으로 상수도 공급체계 구축 ◦ 마을상수도 정비사업을 통한 물 복지 구현 ◦ 공기업 운영 효율화를 통한 건전재정 기반 구축 ◦ 노후상수관 교체공사 조기 시행으로 맑고 깨끗한 물 공급 ◦ 월락정수장 개량사업 추진

□ 농어촌생활용수 개발사업으로 상수도 공급체계 구축

◦ 농어촌지역 상수도 공급을 위한 배수지 계통 사업추진(대강, 덕과)

◦ 자연방사성 물질 검출지구(2차) 상수관로 매설(송동 문치·생촌)

◦ 자연방사성 물질 검출지구(3차) 실시설계 완료(주천 배촌, 덕촌)

◦ 두메마을 광역상수도 직접공급사업 상수관로 매설(산동 월산·석동)

◦ 대상지구 농어촌생활용수 개발사업 추진(산동 대상·상신)

□ 마을상수도 정비사업을 통한 물 복지 구현

◦ 마을상수도 5개 지구(보절 다산, 산내 백일·장자터, 주생 상도, 운봉 덕산) 5km 정비 중

◦ 마을상수도 긴급복구 및 유지보수 추진(현 16건 완료)

□ 공기업운영 효율화를 통한 건전재정 기반 구축

◦ 과년도 사용료 체납금 징수활동 강화를 통한 자주재원 확충 : 125백만원(징수율 99%)

◦ 급수지역 확대로 세입확충 도모 : 178백만원 / 166전

◦ 2019년 지방공기업 경영평가 : 나 등급(전북 1위)

- 2016년 평가부터 3년 연속 전북 1위

□ 노후상수관 교체공사 조기 시행으로 맑고 깨끗한 물 공급

◦ 노후상수관 교체공사 7개소(8.2km) 완료

- 시청 2주차장·우성아파트·공설시장 4월 완료, 명지2차아파트 5월 완료,        화정동 7월 완료, 요천로 2·3구간 8월 완료

□ 월락정수장 개량사업 추진

◦ 환경부 지방상수도 현대화사업 국가예산 확보 / 국비 1,217백만원

◦ 월락정수장 기본 및 실시설계, 각종 인·허가 업무 추진

- 환경, 재해, 건축경관, 지방기술심의, 수도사업인가, 실시계획인가 등

2019년 주요업무 추진실적

상수도 공기업의 건전재정 구축

□ 개    요

◦ (추진목표) 상수도 급수구역 확대와 체납자에 대한 징수로 세입 목표

달성하여 건전재정 운영 도모

◦ 연도별 세입 증감 내역

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	전년대비
세 입	14,999	15,098	14,439	15,142	19,138	증 26.4%

☞ 2018년 대비 주요증감 요인(증 3,996백만원)

·일반회계 전출금 : 77억원(`18년 50억원 대비 27억원 증)

·월락정수장 개량사업비 확보 : 12억 96백만원

□ 추진실적

◦ 과년도 사용료 체납금 징수활동 강화로 자주재원 확보  : 125백만원

- 체납특별징수 기간 운영(매분기) : 단수조치 52건, 재산압류 20건

◦ 수도요금 징수내역

(단위 : 백만원)

연 도	부 과 액	징 수 액	징 수 율
2019년	3,578	3,494	97.6%
2018년	6,434	6,396	99.4%

◦ 상수도 급수구역 확대로 인한 사용료 수입 확충(166전) : 178백만원

◦ 이자수입                   : 11백만원

◦ 2019년 지방공기업 경영평가 : 나 등급(전북 1위)

- 2016년 평가부터 3년 연속 전북 1위

□ 금후계획

◦ 수도요금 목표 징수율을 상향 조정(99%)하여 건전재정 기반 구축

- 체납요금 징수를 위한 행정처분 지속 추진(단수, 재산 압류 등)

◦ 예산절감 시책 발굴 등을 통한 경영효율화 도모

마을상수도 정비사업

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12월(연중)

◦ 위    치 : 운봉읍 외 15 면․동 / 82개소(마을상수도 51, 소규모 급수시설 31)

◦ 사 업 비 : 1,152백만원《정비 752, 긴급복구 200, 자동수위조절기 200》

(균특 360, 시비 792)

◦ 사 업 량

- 개량 7개 지구 L=5.0㎞, 물탱크 설치 2조

- 자동수위조절기 교체 46개소

- 누수 긴급복구 및 유지보수(연중 수시)

□ 추진실적

◦ 노후된 자동수위조절기 교체 완료(19개 마을 / 46개 시설) : `19. 3월

◦ 마을상수도 수질검사 추진(원수 1회, 정수 3회)       : `19. 2. ~ 8월

◦ 마을상수도 물탱크 설치공사 완료(2개소)             : `19. 5. ~ 7월

- 산내 와운, 인월 달오름

◦ 마을상수도 개량공사 완료(4개소)                    : `19. 3. ~ 8월

- 보절 다산, 산내 장자터·백일, 운봉 덕산

◦ 누수 긴급복구 및 유지보수공사 추진(수시)           : `19. 1. ~ 8월

□ 금후계획

◦ 마을상수도 정비공사 완료(1개소)                  : `19. 10월

- 주생 상도

◦ 마을상수도 수질검사 지속 추진(정수 1회)          : `19. 11월

◦ 누수 긴급복구 및 유지보수공사 지속 추진(수시)    : `19. 9. ~ 12월

광역상수도 마을권 사업

□ 개    요

◦ 총괄사업

(단위 : 백만원)

구 분	전 체		기투자		2019년		이후계획
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
마을권급수	347마을	20,160	294마을	17,604	12마을	708	41마을	1,848

◦ 2019년 사업

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12월

- 위    치 : 인월면 월평마을 등 12개 마을

- 사 업 량 : 급수관 1지구 L=1.2㎞, 계량기 설치 500가구

- 사 업 비 : 708백만원(시비)

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 및 주민설명회 개최	: `19. 1. ~ 3월

◦ 광역상수도 마을권 급수공사 완료                  : `19. 5월

- 인월 월평, L=1.2km

◦ 마을권 계량기 설치공사 완료(9개 마을 / 204가구)   : `19. 8월

- 대강 산촌․양촌, 송동 오촌․원촌․문치․생촌, 주천 웅치, 인월 월평, 운봉 덕산

□ 금후계획

◦ 마을권 계량기 설치공사 지속 추진(3개 마을)        : `19. 9. ~ 12월

- 주생 대지, 보절 다산, 보절 부흥

농어촌 생활용수 개발사업

□ 개    요

사 업 명	사 업 량	총 사 업 비(백만원)			사업기간	비 고 (공정)
		계	국 비	시 비
계	6개 지구 56개 마을	22,310	15,605	6,705 (98)	2015~2021
대강 배수지계통	상수관로 L=58km 24개 마을	7,600	5,318	2,282	2013~2018	100%
덕과 배수지계통	상수관로 L=6.2km 15개 마을	6,530	4,562	1,968	2015~2021	65%
자연 방사성물질 검출지구(2차)	상수관로 L=11.2km 10개 마을	3,050	2,135	915	2016~2021	35%
두메마을 광역상수도 직접 공급 사업	상수관로 L=4.7km 2개 마을	650	454	196 (98)	2017~2019	90%
대상지구 농어촌 생활용수개발사업	상수관로 L=10.0km 2개 마을	2,500	1,750	750	2018~2021	45%
자연 방사성물질 검출지구(3차)	상수관로 L=8.4km 3개 마을	1,980	1,386	594	2019~2021	신규 사업

(  ) : 한국수자원공사 예산

□ 재원투자 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2019이후	비고
계	22,310	9,900	3,300	2,705	6,405
국 비	15,605	6,825	2,386	1,910	4,484
시 비	6,705	3,075	914	795	1,921

□ 추진실적

◆ 농촌지역 상수도 공급(56개) : 완료 37개, 계획 19개

◦ 대강 배수지계통(24개) : 완료-24개

- 완료 : 강석, 사촌, 석촌, 방동, 저동, 월산, 금탄, 광암, 생사, 신기, 가덕, 방산, 송내,

입암, 대치, 평촌, 옥전, 수촌, 산촌, 곡촌, 양촌, 도곡, 새터, 택촌

◦ 덕과 배수지계통(15개) : 완료-11개, 계획-4개(`20년까지)

- 완료 : 보절(연산, 성북, 신기, 중현, 계월, 내황, 부흥), 수지(신평, 내호곡),               송동(원촌, 오촌)

- 계획 : 2020년까지 4개 마을 급수완료 계획

·사매(노봉), 보절(금계, 호복동, 다산)

◦ 두메마을 광역상수도 직접공급사업(2개) : 관로포설 완료, 계획–2개(`19년까지)

- 완료 : 관로포설

- 계획 : 2019년까지 배수지 설치 완료 계획

·산동(월산, 석동)

◦ 대상지구 농어촌 생활용수 개발사업(2개) : 관로포설 완료, 계획–2개(`21년까지)

- 완료 : 관로포설

- 계획 : 2020년까지 배수지 및 전체사업 완료 계획

·산동(대상, 상신)

◦ 자연방사성지구(2차)(10개) : 완료-2개, 계획-8개(`21년까지)

- 완료 : 송동(문치, 생촌)

- 계획 : 2021년까지 전체사업 완료 계획(하수도 병행)

·주천(내·외용궁, 회덕, 노치, 용동, 고촌, 내기), 운봉(주촌)

◦ 자연방사성지구(3차)(3개) : `19년 실시설계 용역 완료, 계획-3개(`21년까지)

- 계획 : 2021년까지 전체사업 완료 계획(주천 배촌, 덕촌, 안곡)

□ 금후계획

◦ 설계완료 지구(자연방사성지구 3차)

- 사업시행계획 주민설명회 개최              : `19. 12. ~ `20. 2월

◦ 공사시행                                   : `20. 2. ~ `21. 12월

노후상수관 교체공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동지역 내 급수지역

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2022년(10년)

◦ 사업규모 : 노후상수관 교체 135km

◦ 총사업비 : 22,000백만원(시비)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2019년	2020년 이후	비 고
22,000	14,496	2,700	4,804

※ 2019년 시행

- 사 업 량 : 상수관 교체 L=8.2km(상수관망 L=7.5km, 타공사 L=0.7km)

- 위    치 : 요천로 2·3구간, 명지2차, 화정동 ⇒ 자체 시행

시청2주차장, 우성아파트, 공설시장 ⇒ 타공사 병행

□ 추진실적

◦ `18년까지 노후 상수관 교체 : L=90km(타부서 10.2km 포함) ⇒ 66.7%

◦ `19년 상반기 실적          : L=8.2km(72.7%)

- 실시설계용역 완료                                 : `19. 2월

- 명지2차아파트 주변 노후상수관 교체공사 완료       : `19. 5월

- 타공사 병행 사업 준공(3개 지구)                    : `19. 5월

- 화정동 노후상수관 정비공사 완료                   : `19. 7월

- 요천로(2구간) 노후상수관 정비공사 완료             : `19. 8월

□ 금후계획

◦ 2020년, 2019년 하반기 시행 공사 실시설계 용역    : `19. 8. ~ 10월

- 위  치 : 남원대교 ~ 승사교, 노암동, 양림단지

◦ 요천로 3구간 노후상수관 교체공사 준공            : `19. 9월

◦ 남원대교 승사교 구간 노후상수관 교체공사 착공    : `19. 11월

누수다발지역 개선공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수지역(읍면동)

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2020년(9년)

◦ 사업규모 : 누수발생 상수관(PVC, PE관 등) 교체 / L=56.0km

◦ 총사업비 : 8,230백만원(시비)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2019년	2020년 이후	비 고
8,230	5,430	1,000	1,800

※ 2019년 시행

- 사 업 량 : 상수관 교체 L=5.12km

- 위    치 : 주천면 용담마을, 금지면 상귀마을

□ 추진실적

◦ `18년까지 관로 교체 : L=36.7km(65.5%)

◦ `19년 상반기 실적   : L=5.12km(74.7%)

- 실시설계 용역 완료                                    : `19. 2월

- 금지상귀 누수다발지역 개선공사 완료                   : `19. 7월

□ 금후계획

◦ 용담마을 누수다발지역 개선공사 완료             : `19. 10월

◦ 2020년 시행 공사 실시설계용역 시행              : `19. 10. ~ 12월

월락정수장 개량사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 월락동 지내

◦ 사업내용 : 정수장 시설 전면개량 Q=15,000톤/일

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)

◦ 총사업비 : 325억원(국비 162.5, 도비 32.5, 시비 130)

- 2019년 사업비 24.3억원(국비 12.1, 도비 2.4, 시비 9.8)

□ 추진실적

◦ 월락정수장 기본 및 실시설계 추진	: `16. 12. ~ `19. 7.

◦ 2019년 국가예산 확정(1,217백만원)	: `18. 12. 20.

◦ 설계의 경제성 검토(VE) 완료	: `19. 3. 25.

◦ 재해, 소규모 환경영향평가 추진 및 협의    : `19. 3. ~ 7.

◦ 건축물경관위원회 심의 완료	: `19. 6. 19.

◦ 건설기술 심의(전라북도) 완료	: `19. 7. 17.

◦ 주민설명회 개최(2회, 도통동 통장·주민)    : `19. 7. 23. / 8. 20.

◦ 수도사업 인가 신청(전북도)	: `19. 8. 5.

□ 쟁점 및 대책

◦ 월락정수장 전면개량에 따른 단수발생 우려

⇒ 급수체계유지로 주민 불편 최소화

◦ 소음, 진동, 비산먼지 등 공사로 인한 피해 발생 우려

⇒ 지역주민 소통 해소

□ 금후계획

◦ 월락정수장 건설사업 관리(감리)용역 시행   : `19. 9월 초

◦ 월락정수장 개량사업 공사 발주	: `19. 9월 중순

◦ 시공업체 선정 및 공사 착공	: `19. 10월 중순

- `19년 공사분 자재창고 철거 및 관리동 신축