2020. 1.

2020년 주요업무 계획

환경사업소

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2019년 주요업무 결산

□ 2020년 중점 추진방향

□ 2020년 주요업무 계획

◦ 강우시 하수관로 시범사업

◦ 노후하수관로 정비사업

◦ 남원[3단계] 하수관로 정비사업

◦ 마을하수도 설치사업

◦ 남원공공하수처리시설 개선 및 운영 관리

◦ 요천생태습지공원 사랑받는 공원 조성

◦ 소규모 마을하수처리시설 미세목 자동스크린 설치

◦ 운봉·인월 및 소규모 하수처리시설 관리대행

◦ 소규모 마을하수처리시설 개량사업

◦ 소규모 마을하수 및 중계펌프시설 원격감시제어 구매 및 설치

◦ 운봉·인월 하수처리시설 총인시설 제어반 교체

일  반  현  황

□ 기    구

									환경사업소장
									강 인 식
하수경영담당					하수시설담당								하수처리담당										마을하수담당
박 병 준					강 자 청								양 병 우										문 하 성
∘행정종합계획수립 ∘회계, 시설물 관리 ∘공기업 특별회계 운영 ∘생태습지공원 관리					∘하수도 중장기계획 수립 및 추진 ∘하수관거 정비, 마을하수도 사업 시행 및 유지관리								∘남원하수처리장 운영 ∘음식물처리시설 운영 ∘분뇨처리시설 운영 ∘하수슬러지 처리시설 관리․감독										∘운봉․인월 하수 처리장 운영 관리 ∘소규모하수처리시설 운영 관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	25	1	4	5	8	7
현 원	22	1	8	6	4	3	청 경 2 환경관리원 3 공 무 직 4
증 감	△3	-	4	1	△4	△4

남원시 하수도 공기업 관리현황

□ 하수처리시설 현황

◦ 처리장 시설수 : 64개소

◦ 처리용량      : 55,943㎥/일

◦ 시설별 현황                                     (2019. 11월말 기준)

시 설 명	위 치	시설용량(㎥/일)	비 고
계	64개소	55,943
남 원 하수처리장	주생면 요천로 1036-207	50,000
운 봉 하수처리장	운봉읍 황산로 1181-13	800
인 월 하수처리장	인월면 천왕봉로 214	1,000
소규모 하수처리장	읍․면지역 분포	4,143	61개소

□ 요천생태습지공원 현황

위 치	조성규모	준공일자	주요시설
주생면 중동리 1275	145,298㎡	2014.12.01.	생태탐방로,야구장,다목적구장,애견놀이터,모정 등

□ 하수관로 현황                           (2019. 11월말 기준)

구 분	계획연장 (㎞)	시설연장(㎞)			보급률 (%)
		계	합류식	분류식
2019년	565.3	475.7	112.1	363.6	81.6

□ 하수처리 현황                                             (2019. 11월말 기준)

총인구 (명)	하수처리인구 (명)	보급률 (%)	시설용량 (㎥/일)	하수발생량 (㎥/일평균)	하수처리량 (㎥/일평균)	하수처리율 (%)
81,528	65,985	80.9	56,549	46,373	42,585	91.8

□ 하수도요금 현황                            (2018년 결산 기준)

하수부과량 (천톤)	하수수익 (백만원)	총괄원가 (원/㎥)	하수도요금 (원/㎥)	현실화율 (%)	비 고
6,145	2,861	3,753.87	465.68	12.46

□ 2020년 예산규모 : 23,230백만원

◦ 2020년 예산

(단위 : 백만원)

구 분	2020년	2019년	증감(%)
합 계	23,230	27,684	△16.09
일반회계	449	459	△2.18
특별회계	22,781	27,225	△16.32

▷ 2020년 특별회계 : 22,781백만원

◦ 세    입

(단위 : 백만원)

구 분		2020년	2019년	증감(%)
합 계		22,781	27,225	△16.32
자체수입		4,125	3,922	5.18
의존수입	국비	6,056	11,103	△45.46
	지원금	12,600	12,200	3.28

◦ 세    출

(단위 : 백만원)

구 분		2020년	2019년	증감(%)
합 계		22,781	27,225	△16.32
사업비	소계	14,931	21,012	△28.94
	투자사업	13,454	19,580	△31.29
	경상사업	1,477	1,432	3.14
비사업	소계	7,850	6,213	26.35
	행정운영	7,726	6,117	26.30
	예 비 비	124	96	29.17

2019년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 노후하수도 선진화를 위한 관로 정비 및 소규모 하수처리시설 개량사업 국비반영 ◦ 시민의 휴식과 힐링의 장소를 위한 요천생태습지공원 각종 편의시설 보강

□ 하수도시설 지속적인 확충 및 유지관리

◦ 강우시 하수관로 시범사업 및 하수관로 정비사업

- 차집관로 및 2단계 하수관로 정비사업 착공 및 공사추진

- 3단계 하수관로 및 노후하수관로 정비사업 공사착공

◦ 마을하수도 설치사업

- 용전지구 및 서도지구 마을하수도 설치사업(관로, 처리장) 공사추진

□ 하수처리 노후시설물 개선 및 최적운영으로 청정하천 수질보전

◦ 남원·운봉·인월 하수처리시설 방류수 수질기준 준수

구 분	BOD(5㎎/L)	SS(10㎎/L)	T-N(20㎎/L)	T-P(0.3㎎/L)	비고
남원처리장	2.2	3.3	12.008	0.057
운봉처리장	1.4	3.2	5.514	0.085
인월처리장	1.6	3.2	4.253	0.034

◦ 소규모 마을하수처리시설 방류수 수질기준 초과 최소화

- 61개소 중 2016년 1개소, 2017년 2개소, 2018년 6개소, 2019년 9개소

□ 요천생태습지공원 시민친화공간 조성

◦ 대형모정 1개소, 모정 2개소, 파고라 1개소, 그늘막 7개소, 대형주차장 1개소, CCTV 3개소 설치

◦ 수목식재 및 이식(은행나무 30주, 느티나무 15주, 팽나무 35주, 메타세콰이어 56주)

◦ 요천생태습지공원 사후 모니터링 실시(생태연구소)

	아쉬운 점
◦ 요천생태습지공원 애견놀이터 방문객 증가에 따라 이용시간 연장요구가 많으나, 운영관리 인력 부족으로 어려움 → 아침·야간운영시간 계절별 탄력운영(애견놀이터 1명 증원)

2020년 중점 추진방향

안정적인 생활하수처리 및 공기업 운영효율 향상

3대 전략		7대 과제
친환경 하수관리로 청정 수질보전		① 하수도시설 지속적인 확충 및 유지관리 - 인구 기준 하수도 보급률 2020년 90% 보급 ② 강우시 안정된 하수수집·이송·처리능력 확보 ③ 효율적 하수도 서비스로 시민불편 해소
완벽한 생활하수처리		④ 완벽한 생활하수처리(방류수 수질기준 준수) ⑤ 운봉·인월·소규모 하수처리시설 관리대행 실시 - 전문인력 확보를 통한 안정적인 수질관리
공기업 특별회계 효율적 운영		⑥ 지방공기업(하수도) 경영평가를 통한 효율적 운영 ⑦ 투명하고 효율적인 공기업 특별회계 운영 및 공개

2020년 주요업무 계획

강우시 하수관로 시범사업

□ 개    요

구 분		차집관로 정비사업		남원[2단계] 하수관로 정비사업
위 치		➢ 남원시 일원(8개 하천)		➢ 남원시 일원(6개 지역)
사 업 량		➢ 차집관로 정비 L=31km		➢ 하수관로 정비 L=57km ➢ 배수설비 2,900여 가구
총사업비		➢ 42,000백만원(국29,400, 시12,600) ➢ 기투자 : 31,911 `20년 : 259 `20년까지 투자실적 ⇒ 77%		➢ 28,000백만원(국19,600, 시8,400) ➢ 기투자 : 22,055 `20년 : 851 `20년까지 투자실적 ⇒ 82%
사업기간		➢ 2015~2021		➢ 2015~2021

□ 추진실적

◦ 시범사업 대상 선정	: 2015. 02.

◦ 한국환경공단 위·수탁 협약 체결	: 2015. 03.

◦ 용역 발주	: 2015. 06.

◦ 기본설계 완료에 따른 VE검토 추진	: 2016. 05.

◦ 하수도정비 기본계획(변경) 수립	: 2016. 05. ~ 07.

◦ 공사착공	: 2018. 10.

◦ 공 정 률 : 40%	: 2019. 12.

(차집 : 31km 중 12km 완료, 2단계 : 57km 중 35km 완료, 배수설비 2,880가구 중 1,456가구 완료)

□ 금후계획

◦ 전체사업 완료	: 2021. 10월까지

노후하수관로 정비사업

◦ 노후하수관로 정밀진단(2016. 04.) 결과에 따른 정비로 도로함몰 등      안전사고에 선제적 대응

◦ 1993년 조성된 도통1택지는 당시 기 분류식화 되었으나, 오접과 노후화로     금회 배수설비 정비계획 수립

□ 개    요

◦ 사업위치 : 남원시 일원(시청 주변-도통택지 1지구)

◦ 사업내용 : 노후하수관로 정비 L=5.6km, 배수설비 300여 가구

◦ 사 업 비 : 8,448백만원(국비 3,224, 시비 5,224)

※ 2020년 사업비 : 1,660백만원(시비 1,660)

- 국비 3,224백만원은 기 교부완료, 2020년은 미반영된 시비반영

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: 2017. 02. ~ 2017. 11.

◦ 환경부 재원협의 등 행정절차 이행	: 2018. 05. ~ 2019. 07.

◦ 계약심의 완료                             : 2019. 08.

◦ 원가심사(전라북도) 완료	: 2019. 09.

◦ 공사발주                                  : 2019. 10.

◦ 입찰공고 및 적격심사                      : 2019. 11.

◦ 공사착공	: 2019. 12.

□ 금후계획

◦ 공사추진                                  : 2020. 01. ~ 2021. 12.

남원[3단계] 하수관로 정비사업

◦ 하수량 과다발생 예방을 위하여 시가지 강우시 합류식 지역 및 운봉권     처리구역 내에서 이송되는 불명수 유입 방지 등 하수처리 운영비용     절감과 노후하수관로 정비 병행시행으로 안전한 하수시설을 확보하기 위함

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원처리구역 및 운봉처리구역

◦ 사업내용

- 남원처리구역 : 오수관로 설치 L=31.7km, 배수설비 2,200여 가구

- 운봉처리구역 : 오수관로 설치 및 개량 L=15.2km

◦ 사 업 비 : 37,818백만원(국비 22,128, 시비 15,690)

※ 2020년 사업비 : 3,159백만원(국비 2,211, 시비 948)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2021년

□ 추진실적

◦ 2018년 신규사업지구로 확정 내시           : 2017. 11.

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행                : 2017. 11. ~ 2019. 03.

◦ 설계VE, 설계안전성 검토 완료              : 2019. 07.

◦ 건설기술심의(전라북도) 완료                : 2019. 09.

◦ 계약심의 완료                             : 2019. 10.

◦ 조달청 원가심사 및 계약체결 의뢰          : 2019. 10.

◦ 공사개찰                                  : 2019. 12.

◦ 공사계약 및 착공                          : 2019. 12.

□ 금후계획

◦ 공사추진                                  : 2021. 12월까지

마을하수도 설치사업

◦ 낙후된 농촌지역 주거환경 개선 및 주민 하수도 복지를 위하여 분류식     오수관로 및 배수설비 설치

◦ 기존 처리장(용전)의 효율저하 및 용량부족에 따라 처리장 신·증설

□ 개    요

사 업 명	사업기간	총사업비	사업량
계		14,783백만원 (국 10,348 시 4,435)	하수관로 L=15.7km 처리시설 2개소
용전지구 마을하수도 설치사업	2016 ~ 2020	11,474백만원 (국 8,032, 시 3,442)	하수관로 L=11.4km 처리시설 Q=200㎥/일
서도지구 마을하수도 설치사업	2017 ~ 2020	3,309백만원 (국 2,316, 시 993)	하수관로 L=4.3km 처리시설 Q=100㎥/일

□ 추진실적

< 용전지구 >

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행                   : 2018. 05.

◦ 관로공사 착공(공정률 : 70%)                   : 2018. 06.

◦ 처리장공사 착공                              : 2019. 11.

< 서도지구 >

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행                   : 2018. 12.

◦ 관로공사 착공(공정률 : 50%)                   : 2019. 03.

◦ 처리장공사 착공                              : 2019. 11.

□ 금후계획

◦ 공사추진	: 2020. 12월까지

남원공공하수처리시설 개선 및 운영 관리

◦ 하수·분뇨 및 음식물류 폐기물 병합처리로 노후시설 개선을 통해      깨끗한 환경제공 및 방류수질 법적기준 준수

◦ 위생적이고 안정적인 수질관리로 하천수질오염 방지에 기여하고자 함

□ 개    요

◦ 시 설 명 : 남원공공하수처리시설

◦ 시설용량 : 50,000톤/일(※ 처리공법 : Symbio)

◦ 사업기간 : 2020. 01. ~ 12월(연중)

◦ 총사업비 : 933백만원

◦ 사업내용 : 남원공공하수처리시설 주요시설 개선 및 운영

□ 추진계획

◦ 유입동 세목스크린 협잡물 이송 스크류 컨베이어 설치   : 2019. 12.

◦ 소화슬러지 원심탈수기 설치사업 착공                 : 2019. 12.

◦ 남원하수처리장 악취기술진단                         : 2020. 01.

◦ 음식물처리시설 미세파쇄기 협잡물 이송장치 설치      : 2020. 03.

◦ 남원하수처리장 노후 유량계 및 제어반 교체           : 2020. 05.

□ 기대효과

◦ 협잡물 분리선별을 통한 수질개선 및 법적 방류수질 준수

◦ 슬러지 탈수량 확보 및 고농도 탈리액 질소 부하량 감소

◦ 하수처리시설 노후시설물 개량사업으로 안정적인 운영 관리

요천생태습지공원 사랑받는 공원 조성

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2020. 01. ~ 12월

◦ 총사업비 : 287백만원

◦ 사업내용 : 수목식재 및 모정설치 등 방문객 친화형 공원 운영

□ 추진계획

◦ 애견놀이터 개장시간 조정	: 2020. 01. ~ 12.

- 당  초 : 1명, 6일(화~일)/주, 8시간/일 근무

- 조  정 : 2명, 7일/주, 15시간/일(월별 탄력운영) 교대근무

◦ 생태습지공원 사후 모니터링 용역(10백만원)	: 2020. 02. ~ 12.

◦ 야구장 바닥 흙 보충공사(10백만원)	: 2020. 03. ~ 06.

◦ 회랑(덩쿨식물) 설치공사(45백만원)	: 2020. 03. ~ 06.

◦ 수목 식재공사(100백만원)	: 2020. 03. ~ 06.

◦ 모정 설치공사(60백만원)	: 2020. 03. ~ 06.

◦ 예초, 제초 및 전정 작업(62백만원)	: 2020. 04. ~ 11.

□ 기대효과

◦ 개장시간 계절별 탄력적 운영으로 방문객 요구 대응

◦ 시설물 보수를 통한 이용객 안전사고 예방 및 운동환경 개선

◦ 꾸준한 수목 및 초본류 식재로 아름다운 조망 및 휴식공간 제공

소규모 마을하수처리시설 미세목 자동스크린 설치

□ 개    요

◦ 필 요 성 : 유입하수 내 협잡물 분리선별을 통한 수질개선 및 주변                   주민에게 쾌적한 환경 제공

◦ 사업기간 : 2020. 04. ~ 08월(5개월)

◦ 총사업비 : 2개소, 100백만원(시비) [1개소, 50백만원]

◦ 위    치 : 운봉읍 매요리 275-3 외 1개소

‣ 2개소(고촌·매요 하수처리시설)

◦ 사업규모 : 미세목 자동스크린 2식

◦ 사업내용 : 미세목 자동스크린 신규 설치

□ 추진계획

◦ 실시설계 실시                                       : 2020. 02.

◦ 업체 선정 및 스크린 설치 착수                       : 2020. 05.

◦ 시설 준공                                           : 2020. 08.

◦ 스크린 시운전                                       : 2020. 09.

□ 기대효과

◦ 협잡물 분리선별을 통한 수질개선 및 법적 방류수질 준수

◦ 유입하수 내 슬러지를 사전 선별하여 운영효율성 증대

운봉·인월 및 소규모 하수처리시설 관리대행

□ 개    요

◦ 대    상 : 공공하수도시설 114개소

- 운봉·인월, 소규모 하수처리시설 63개소 및 중계펌프장 51개소

◦ 대 행 비 : 1,680,000천원/년(인건비, 경상수선비, 안전점검비, 약품비 등)

※ 직접 지급 : 320,515천원/년(전력비, 통신료)

◦ 대행기간 : 2020 ~ 2022년(3년)

◦ 근거법령 : 하수도법 제19조의 2(공공하수도 관리대행업 등)

◦ 대행내용 : 방류수질 준수 및 시설물, 기계, 전기설비 유지관리 업무

□ 추진계획

◦ 협약체결                                         : 2019. 12. 18.

◦ 관리대행 실시	: 2020. 01. 01.

□ 기대효과

◦ 전문 운영인력 확보를 통한 업무 전반의 효율성 향상

◦ 시설 간 원거리 위치에 따른 신속한 대처 불가능 문제 해결

◦ 운영방법 개선으로 안정적 수질관리

대행업체 현황

‣ 업 체 명 : (유)일토씨엔엠 대표 최규연 외 1개 업체

‣ 소 재 지 : 전라북도 군산시 조촌4길 24-4

‣ 제안금액 : 1,658,400천원(대행 용역비)

‣ 선 정 일 : 2019. 11. 27.(자체 평가 및 위원회 평가)

소규모 마을하수처리시설 개량사업

□ 개    요

처리장명	사업기간	사업량	총사업비
계		3개소 전면개량	2,340백만원 (국 490, 시 1,850 )
송동면 양평	2018~2020	Q=50㎥/일	1,000백만원 (국 300, 시 700)
금지면 방촌	2019~2020	Q=50㎥/일	740백만원 (국 114, 시 626)
운봉읍 비전	2020	Q=30㎥/일	600백만원 (국 76, 시 524)

□ 추진실적

◦ [양평] 소규모 하수처리시설 기본·실시설계	: 2018. 03. 08. ~

◦ [양평] 하수처리시설 공법 선정	: 2018. 12. 20.

◦ [양평] 처리시설 재원협의	: 2019. 09. 30.

◦ [방촌] 소규모 하수처리시설 기본·실시설계	: 2019. 02. ~

◦ [비전] 하수도정비 기본계획에 의한 국비반영     : 2019. 10.

□ 금후계획

◦ [양평] 공사 착공 및 준공	: 2019. 12. ~ 2020. 12.

◦ [방촌] 인가신청 및 재원협의	: 2020. 03.

◦ [방촌] 공사 착공 및 준공	: 2020. 05. ~ 12.

◦ [비전] 소규모 하수처리시설 기본·실시설계	: 2020. 03. ~

소규모 마을하수 및 중계펌프시설 원격감시제어 구매 및 설치

□ 개    요

◦ 대    상 : 소규모 마을하수처리시설 및 중계펌프장 51개소

◦ 필 요 성

- 시설(중계펌프장) 이상 유·무 사전확인을 통한 민원발생 최소화

- 자동제어 부품 단종, 노후화 설비 교체를 통한 수질관리 철저

◦ 사 업 비 : 490백만원

◦ 사업기간 : 2020. 03. ~ 10월

◦ 사업내용 : 중계펌프장(36개소) 자동제어 신설 및 소규모 마을하수처리

시설(15개소) 노후화 자동제어 교체

□ 추진계획

◦ 실시설계 용역	: 2020. 03.

◦ 물품 구매 및 설치 착수                            : 2020. 06.

◦ 시운전 및 준공                                    : 2020. 10.

□ 기대효과

◦ 시설운영관리 업무 생산성 및 전문성 향상

◦ 운영관리 수준 향상 및 시설물의 안전성 체계 강화

◦ 시설물 고장 등에 대한 신속한 대처 가능으로 민원발생 최소화

운봉·인월 하수처리시설 총인시설 제어반 교체

□ 개    요

◦ 대    상 : 운봉·인월 하수처리시설

◦ 필 요 성

- 내구연한 경과(노후화)로 인한 제어판넬의 교체를 통하여 운영 및 수질관리 철저

◦ 사 업 비 : 100백만원

※ 총인시설 제어반 : 50,000,000원 × 2개소(운봉·인월) = 100백만원

◦ 사업기간 : 2020. 03. ~ 07월

◦ 사업내용 : 방류수질 총인(TP) 법적 기준치 준수를 위한 총인설비 노후

제어판넬 2면 교체

□ 추진계획

◦ 실시설계 용역	: 2020. 03.

◦ 물품 구매 및 설치 착수                            : 2020. 06.

◦ 시운전 및 준공                                    : 2020. 07.

□ 기대효과

◦ 노후설비 개선으로 깨끗한 환경제공 및 시민불편 최소화

◦ 제어반 오작동으로 인한 법적 방류수질 기준 초과 우려 방지