2020. 1.

2020년 주요업무 계획

건   설   과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2019년 주요업무 결산

□ 2020년 중점 추진방향

□ 2020년 주요업무 계획

◦ 도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 변경 용역

◦ 읍면지역 안전한 도로망 확충 정비

◦ 읍면지역시도 정비현황

◦ 농어촌도로 정비현황

◦ 통행불편 마을진입로 정비현황

◦ 위험도로 선형개선

◦ 도로 유지관리사업

◦ 2019~2020 도로 설해대책

◦ 지방하천 정비사업

◦ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업

◦ 소하천정비 종합계획 재수립 용역

◦ 소하천 정비사업

◦ 요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성

◦ 하천 유지관리사업

◦ 하천 유지관리사업(보조)

일  반  현  황

□ 기    구

											건 설 과 장
											진 영 신
건설행정담당										도로담당														하천담당
이 재 우										성 길 경														백 강 규
설해대책추진 도로 유지 관리․보수 도로 점‧사용 허가 국‧공유 재산관리 노점상‧과적 단속										읍면시도 확․포장사업 농어촌도로 확․포장사업 기업유치 기반시설 확충사업 통행불편 도로사업 도로 유지 관리사업														치 수 사 업 하천유지관리 육상골재채취․허가 공유수면관리 하천점․사용허가

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	38	1	3	7	4	4	□청원경찰 : 2 □공 무 직 : 17
현 원	36	1	5	4	4	4	□청원경찰 : 1 □공 무 직 : 17 - 휴직(1) 포함
증 감	△2	-	2	△3	-	-	△1

□ 도로 현황

(단위 : km)

구 분	노선수	총연장	포 장	포장률(%)	비 고
계	841	1,387.7	754.1	54.3
고 속 국 도	2	69.0	69.0	100.0
국 도	5	123.8	123.8	100.0
국가지원지방도	2	47.7	47.7	100.0	전북 98.2%
지 방 도	7	120.2	107.0	89.0	전북 79.2%
시 도	472	174.4	95.4	54.7	전북 67.8%
읍면지역시도	22	215.1	130.6	60.7	전북 54.9%
농 어 촌 도	331	637.5	180.6	28.3	전북 34.3%

□ 하천 현황

(단위 : km)

구 분	개소	하천연장	개수현황(양안)			개수율 (%)	비 고
			계	개 수	미개수
계	389	675.4	1,181.6	815.4	366.2	69.0
국가하천	2	39.1	40.1	40.1		100.0
지 방 하 천	40	246.7	392.9	317.4	75.5	80.8	전북 78.5%
소 하 천	347	389.6	748.6	457.9	290.7	61.2	전북 36.5%

2019년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 지방재정 확충을 위한 국가예산 확보 : 2개 분야 / 2,584백만원 - 도로사업 국·도비 예산확보 : 6개 사업 / 1,471백만원 ·수지 호곡 위험도로(균 500), 이백 초촌 위험도로(균 450), 법정관리 시설물 안전점검용역(소방 45), 교량 내진보강공사(소방 300), 조산 교차로 회전교차로(국 140), 주천 용궁 스노우멜팅(도 36) - 하천사업 국·도비 예산확보 : 7개 사업 / 1,113백만원 ·대강 사석 2소하천(특조 20), 아영 일대천(도 320), 인월 도장천(도 40), 덕과 용산천(도 100), 아영 청계천(특조 220), 요천 식정동(도 300), 이백 백암천(도 113) ◦ 체계적인 도로망 개설로 지역 균형발전 도모 - 주민 실생활에 밀접한 도로망 확충으로 농촌지역 주민 교통 편익 증진 및 정주여건 향상 도모 - 산내 장항교 재가설, 통행불편 마을 진입로(덕과 배산, 사매 화정, 이백 계산, 대강 대치, 금지 방촌) 도로 개설에 따른 지역경제 활성화 및 쾌적한 도로망 확충 ◦ 시민 만족 중심의 도로·하천 유지관리 추진 - 도로 유지관리 : 22분야 / 82개소 / 16,903백만원 - 하천 유지관리 : 하도준설 및 잡목제거 84개소, 하천·기성제 유지관리 43개소 / 5,107백만원 - 법정 관리도로 총 57개 노선 431km에 대해 겨울철 제설작업, 노후포장도로 정비, 과속방지턱 정비, 도로안전시설물 설치 등 도로 유지관리 총력 - 하천 장비임차료 읍면동 자체예산 편성(400백만원)을 통한 응급 복구 및 준설 완료

◦ 지방하천 정비사업 총사업비 변경 승인 : 2개 하천 / 7,936백만원 증액

- 다산천 지방하천 정비사업(승인일 : `19. 10. 25.)

[당초 4,554백만원 ➛ 변경 7,728백만원(증 3,174백만원 / 증 69.7%)]

- 원천천 지방하천 정비사업(승인일 : `19. 11. 14.)

[당초 18,821백만원 ➛ 변경 23,583백만원(증 4,762백만원 / 증 25.3%)]

◦ 소하천 정비사업 총사업비 변경 승인 및 신규사업 확정

- 당동소하천 정비사업(승인일 : `19. 7. 5.)

[당초 7,401백만원 ➛ 변경 10,711백만원(증 3,310백만원 / 증 44.7%)]

- 신규사업 확정 ※ 지방이양 전환사업으로 교부세 증액을 통한 재원보전 확대

·과립소하천 정비사업 : 총 4,180백만원

·산곡소하천 정비사업 : 총 2,369백만원

□ 지역 균형발전을 위한 도로 개설 : 37개 지구 / 16,675백만원

- 37개 지구 중 10개 지구 완공 : 추진공정 47% -

(국 40 / 도 150 / 시 16,485)

◦ 읍면지역시도 확·포장 : 4개 지구(L=8.0㎞, 4,300백만원)

◦ 농어촌도로 확·포장 : 8개 지구(L=12.68㎞, 3,800백만원) / 1개 지구 완공(L=0.3㎞)

◦ 통행불편 마을진입로 : 17개 지구(L=9.51㎞, 6,130백만원) / 5개 지구 완공(L=2.78㎞)

◦ 위험도로 선형개량 : 8개 지구(L=3.63㎞, 2,445백만원) / 4개 지구 완공(L=0.87㎞)

□ 안전하고 쾌적한 도로 유지관리 : 22개 분야 / 101개소 / 16,903백만원

- 101개 지구 중 78개 지구 완공 : 추진공정 77% -

(국 175 / 도 360 / 특교 500 / 시 15,868)

◦ 관내 주요도로 아스콘 재포장 : 11개 지구 / 15.6㎞ / 3,400백만원

- 승사교~동림교(관광단지), 이백교~이백면사무소 등

◦ 걷고 싶은 거리 조성(인도 정비 및 탄성 포장) : 7개 지구 / 5.8㎞ / 900백만원

- 옻칠 공예방~승사교(제방도로), 남원대교~호반삼거리, 승사교~남원대교 등

◦ 기타 지역 도로 유지관리사업 추진 : 83개소 / 12,603백만원

- 춘향교 인도 정비, 백공산4가~남원IC 화단형 분리대, 주생 소지 4가 회전로 등

◦ 도로 제설작업(2018~2019) : 10일(57개 노선 / 431.5㎞)

□ 재해 사전예방을 위한 하천 정비 : 138개소 / 22,850백만원

- 138개 지구 중 74개 지구 완공 : 추진공정 53% -

(국 5,383 / 도 2,306 / 특조 320 / 시 14,841)

◦ 하천 정비(지방하천, 소하천)	: 9개소  /  15,866백만원

- 지방하천 : 4개소 / 7,662백만원

- 소 하 천 : 5개소 / 8,204백만원

◦ 소하천정비 종합계획 재수립 용역	: 2개소   /    1,137백만원

◦ 하천 하도준설 및 잡목제거	: 84개소  /     1,496백만원

◦ 하천 호안 및 제방 정비 추진	: 36개소  /     1,465백만원

◦ 하천 유지관리(보조)	: 5개소   /     1,320백만원

◦ 기성제 유지관리(보조)	: 2개소    /       826백만원

◦ 수해복구사업	: 1식       /       740백만원

	아쉬운 점
◦ 지장물 이설 및 토지 협의 지연으로 적기 추진 어려움 및 주민 불편 초래 ◦ 국도·국지도 내 시설보수, 선형개량, 회전교차로 설치 등 시민의 민원 사항에 대해 유관기관(국토관리사무소, 도로관리사업소) 예산 사정상 신속 처리 미흡

2020년 중점 추진방향

건강하고 안전한 도로·하천 환경 조성

	중 점 추 진 과 제
◦ 생활 밀착형 SOC 시설물 확충 - 여가·휴식공간 제공을 위한 주요도로 걷고 싶은 거리 조성 - 시민 활력을 위한 요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성 ◦ 안전중심 도로환경 - 신속한 제설작업으로 겨울철 안전한 도로 환경 제공 - 위험도로 구조개선으로 주민 생명권·재산권 보호 ◦ 체계적인 도로망 개설 - 환경적 여건 변화를 반영한 도로망 기본계획 수립 - 시(군도) 및 농어촌도로 정비로 주민 소득기반 확충 ◦ 자연이 숨 쉬는 하천 - 환경적 여건변화를 반영한 하천정비종합계획 재수립 - 미개수하천의 자연친화적 생태하천 조성

2020년 주요업무 계획

도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 변경 용역

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 읍면지역

◦ 사 업 량 : 읍면지역시도 및 농어촌도로 353개 노선 L=852.6㎞

◦ 사 업 비 : 500백만원(시비)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2020년(3개년)

◦ 도급업체 : ㈜수성엔지니어링(경남 창원), ㈜성원기술개발(전북 김제)

□ 추진실적

◦ 기본계획 변경 용역 수행	: `18. 4. ~

◦ 농어촌도로 전략환경영향평가 / 사전재해영향성검토 용역 착수 : `18. 11.

◦ 도로건설계획, 농어촌도로 기본계획(변경) 의견반영(읍면동) : `19. 5. ~ 8.

◦ 군도 및 농어촌도로 개선(안) 의견 수렴(남원시의회)       : `19. 11.

< 노선 검토 주요방향 >

◦ 군도 : 도로 개설 실효성 검토, 상위도로로 인한 단절구간 연결(중복결정)

◦ 농어촌도로 : 읍면 의견 수렴에 따른 노선 지정, 마을 주 진입도로

일제 노선 반영, 격하된 군도 노선 신규 지정

< 검토(안) >

(단위 : km)

구 분	당 초		변 경		증 △감
	노선 수	연장	노선 수	연장	노선 수	연장
합 계	353	852.6	410	891.6	57	39.0
군 도	22	215.1	21	164.7	▽ 1	▽ 50.4
농어촌도로	331	637.5	389	726.9	58	89.4

□ 금후계획

◦ 용역 보고회 개최	: `20. 1.

◦ 도로건설·관리계획 및 농어촌도로 정비계획(안) 수립  : `20. 1.

◦ 인접 시군(도) 협의 및 협의의견 검토	: `20. 1. ~ 2.

◦ 전략환경영향평가 및 사전재해영향성검토 용역 수행    : `20. 1. ~ 3.

◦ 도로건설 관리계획 수립 및 농어촌도로 변경 고시	: `20. 3.

읍면지역 안전한 도로망 확충 정비

□ 개    요

◦ 사업규모 : 도로 정비사업 37개 지구, L=33.82㎞

◦ 총사업비 : 68,670백만원(2020 : 4,500백만원)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2023년(7개년)

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 량		총사업비	기투자	2020	2020이후	사업기간
계	37개지구	L=33.82㎞	68,670	28,625	4,500	35,695
읍면지역시도	4개지구	L=8.0㎞	23,600	6,600	800	16,200	`17~`22
농어촌도로	8개지구	L=12.68㎞	23,350	8,450	800	14,250	`17~`23
통행불편	17개지구	L=9.51㎞	15,170	9,730	1,000	4,440	`17~`21
위험도로 선형개선	8개지구	L=3.63㎞	6,550	3,845	1,900	805	`17~`21

□ 추진실적

◦ 읍면지역시도 : 공사 중(부석~오촌, 오리정~상신), 공사착공(평촌~강기, 도산~서매)

◦ 농어촌도로   : 완공(장항교), 공사 중[행덕선, 도용선, 상황선, 배촌선(중송)],                      공사착공(영촌선) 설계 중(배촌선, 견두선)

◦ 통행불편     : 완공(덕과 배산, 사매 화정, 이백 계산, 대강 대치, 금지 방촌),                      공사착공(운봉 장동, 인월 장평, 덕과 수촌), 공사중(보절 내황,                      주천 제바위, 이백 오산길, 인월 중군, 아영 신지, 송동 신기,                      대산 안대실), 설계중(이백 목가, 아영 구지)

◦ 위험도로     : 완공[주생 상동, 운봉 방현(북천), 아영 율동, 주천 가송], 공사중(군도29호선),                      공사착공(수지 남창), 설계중(수지 호곡, 이백 초촌)

□ 금후계획

◦ 읍면지역시도 : `20년 완공(오리정~상신), `21년 완공(부석~오촌, 도산~서매),

(4개 지구)     `22년 완공(평촌~강기)

◦ 농어촌도로   : `20년 완공(도용선, 상황선, 행덕선), `21년 완공(영촌선, 배촌선),

(7개 지구)     `22년 완공(견두선), `23년 완공(부흥선)

◦ 통행불편     : `20년 완공(보절 내황, 주천 제바위, 이백 오산길, 인월 중군,

(12개 지구)     아영 신지, 송동 신기, 덕과 수촌, 대산 안대실),

`21년 완공(이백 목가, 아영 구지, 운봉 장동, 인월 장평)

◦ 위험도로     : `20년 완공(군도29호선, 수지 남창, 이백 초촌),

(4개 지구)     `21년 완공(수지 호곡)

읍면지역시도 정비현황

□ 개    요

◦ 계    획 : 19개 사업 / 36.46㎞ / 72,530백만원

◦ 기 투 자 : 15개 사업 / 28.46㎞ / 48,930백만원

◦ 시 행 중 :  4개 사업 /  8.00㎞ / 23,600백만원(※ 2020 : 800백만원)

- `20 완공 : 1개 지구, `21 완공 : 2개 지구, `22 완공 : 1개 지구

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2022년(17개년)

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2020	2021이후
합 계	4개사업	8.00	23,600	6,600	800	16,200	29.5
부석~오촌	송동면	2.60	5,900	2,100	200	3,600	39	`17 ~ `21
오리정~상신	사매면	1.00	2,300	1,600	200	500	78	`17 ~ `20
평촌~강기	이백면	2.50	13,900	2,500	200	11,200	19	`17 ~ `22
도산~서매	주생면	1.90	1,500	400	200	900	20	`19 ~ `21

□ 추진실적

◦ 부석~오촌      : 1차분 준공(토공), 2차분 추진(토공, 배수공)

◦ 오리정~상신    : 1차분 준공(8.27.), 2차분 추진(배수공, 구조물공)

◦ 평촌~강기	: 1차분 착공(평촌~목가 / 11.18.), 용지보상 추진

◦ 도산~서매	: 1차분 착공, 용지보상 추진

□ 금후계획

◦ 2020년 완료    : 1개 사업(오리정~상신)

◦ 2021년 완료    : 2개 사업(부석~오촌, 도산~서매))

◦ 2022년 완료    : 1개 사업(평촌~강기)

농어촌도로 정비현황

□ 개    요

◦ 계    획 : 24개 사업 / 28.54㎞ / 50,774백만원

◦ 기 투 자 : 16개 사업 / 15.86㎞ / 27,424백만원

◦ 시 행 중 :  8개 사업 / 12.68㎞ / 23,350백만원(※ 2020 : 800백만원)

- `19 완공 : 1개 지구, `20 완공 : 3개 지구, `21 완공 : 2개 지구, `22 이후 : 2개 지구

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2023년(18개년)

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2020	2021이후
합 계	8개사업	12.68	23,350	8,450	800	14,100	39.6
부흥선(신규)	보절면	1.20	2,100		200	1,900	9	`20 ~ `23
도용선	주생면	0.67	1,650	1,000	100	550	67	‘17 ~ ‘20
상황선	산내면	0.60	2,100	1,050	100	950	55	‘18 ~ ‘20
견두선	수지면	4.00	6,000	700	100	5,200	13	‘18 ~ ‘22
배촌선	주천면	3.56	5,500	700	200	4,600	16	‘19 ~ ‘21
영 촌 선	주생면	1.10	1,800	800	100	900	50	`19 ~ `21
장항교 재가설	산내면	0.30	2,600	2,600			100	‘17 ~ ‘19
행덕선	운봉읍	1.25	1,600	1,600			100	‘17 ~ ‘20

□ 추진실적

◦ 도 용 선	: 용지보상(50%), 2차분 추진(토공 및 수로박스 / 공정률 10%)

◦ 상 황 선      : 용지보상(70%), 공사 착공(8.19.)

◦ 견 두 선	: 실시설계, 소규모 환경영향평가, 사전재해영향, 문화재

지표조사 용역 발주(`19.11.)

◦ 배 촌 선	: 실시설계(공정 50%), 배촌선(중송) 착공(8.12.) 및 용지보상 추진

◦ 영 촌 선	: 보완 설계용역 완료(11.8.), 1차분 착공(12.10.)

◦ 장항교 재가설 : 교량 개통 및 준공(6.25.)

◦ 행 덕 선      : 2차분 공사 추진(L형측구 및 보조기층 포설 / 70%)

□ 금후계획

◦ 2020년 완료   : 3개 사업(도용선, 상황선, 행덕선)

◦ 2021년 완료   : 2개 사업(영촌선, 배촌선)

◦ 2022년 완료   : 1개 사업(견두선)

◦ 2023년 완료   : 1개 사업(부흥선)

통행불편 마을진입로 정비현황

□ 개    요

◦ 계    획 : 51개 사업 / 30.11㎞ / 27,086백만원

◦ 기 투 자 : 34개 사업 / 20.60㎞ / 11,916백만원

◦ 시 행 중 : 17개 사업 /  9.51㎞ / 15,170백만원(※ 2020 : 1,000백만원)

- `19 완공 : 5개 지구, `20 완공 : 8개 지구, `21 완공 : 4개 지구

◦ 사업기간 : 2008 ~ 2021년(14개년)

□ 추진실적

◦ 실시설계 : 2지구

- 이백 목가, 아영 구지

◦ 공사 착공  : 3지구

- 운봉 장동, 인월 장평, 덕과 수촌

◦ 공 사 중 : 7지구

- 보절 내황, 인월 중군, 아영 신지, 대산 안대실, 주천 제바위,

이백 오산길, 송동 신기

◦ 공사완료 : 5지구

- 이백 계산, 대강 대치, 금지 방촌, 덕과 배산, 사매 화정

□ 금후계획

◦ 2020년 완료 : 8개 사업

- 보절 내황, 주천 제바위, 이백 오산길, 인월 중군, 아영 신지, 송동 신기, 덕과 수촌, 대산 안대실

◦ 2021년 완료 : 4개 사업

- 이백 목가, 아영 구지, 운봉 장동, 인월 장평

□ 통행불편 마을진입로 정비사업 세부내역

사 업 명	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	추진실적	계획
		계	기투자	2020	2021 이후
17개 사업	9.51	15,170	9,730	1,000	4,440	70.7
이백 목가마을 (`19~`21)	0.80	1,900	150	200	1,550	18	실시설계 착수	용지보상, 공사발주
아영 구지마을 (`19~`20)	0.34	700	400	100	200	71	실시설계 착수	용지보상, 공사발주
운봉 장동마을 (`19~`20)	0.45	500	200	100	200	60	공사발주	용지보상, 시공
인월 장평마을 (`19~`21)	0.50	1,800	380	200	1,220	32	공사발주	용지보상, 시공
덕과 수촌마을 (`19)	0.15	200	200			100	착공	용지보상, 시공
보절 내황마을 (`17~`20)	1.04	1,620	1,100	200	320	80	시공,용지보상	용지보상, 시공
인월 중군마을 (`17~`19)	0.78	1,550	1,550			100	-1공구 : 시공 -2공구 :실시설계	-1공구 : 시공 -2공구 : 주민설명회,발주
아영 신지마을 (`17~`19)	0.31	1,200	1,200			100	시공	완공(`20. 5월)
대산 안대실마을 (`18~`20)	0.46	1,250	1,250			100	시공	용지보상, 시공
주천 제바위마을 (`19~`20)	0.65	900	300	100	500	44	착공, 용지보상	용지보상, 시공
이백 오산길 (`19~`20)	0.78	850	300	100	450	47	착공, 용지보상	용지보상, 시공
송동 신기마을 (`19~`20)	0.47	500	500			100	착공, 용지보상	완공(`20. 9월)
이백 계산마을 (`17~`19)	0.31	450	450			100	공사완료
대강 대치마을 (`18~`19)	0.29	400	400			100	공사완료
금지 방촌마을 (`18~`19)	1.50	400	400			100	공사완료
덕과 배산마을 (`18~`19)	0.45	600	600			100	공사완료
사매 화정마을 (`19)	0.23	350	350			100	공사완료

위험도로 선형개선

□ 개    요

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2020	2021이후
합 계	8개사업	3.63	6,550	3,845	1,900	805	88
이백 초촌(신규)	이백면	0.30	900		900		100	`20
수지 호곡	수지면	0.40	1,900	95	1,000	805	57	`19 ~ `21
군도29호선 (지리산IC~아영면사무소)	아영면	1.3	1,600	1,600			100	‘17 ~ ‘20
수지 남창	수지면	0.76	500	500			100	`18 ~ `20
주생 상동	주생면	0.37	650	650			100	‘17 ~ ‘19
운봉 방현(북천)	운봉읍	0.14	400	400			100	`18 ~ `19
아영 율동	아영면	0.14	300	300			100	`18 ~ `19
주천 가송	주천면	0.22	300	300			100	`18 ~ `19

□ 추진실적

◦ 이백 초촌	: 실시설계용역 추진(20%) ※ 국비(`20 : 450백만원)

◦ 수지 호곡	: 실시설계용역(50%) ※ 국비(`19 : 40백만원 / `20 : 500백만원)

◦ 군도29호선(아영) : 1차분·2차분 추진(토공 및 배수공) / 공정률 30%

◦ 수지 남창	: 공사 착공(11.29.)

◦ 주생 상동	: 준공(10.23.)

◦ 운봉 방현(북천)  : 준공(12.06.)

◦ 아영 율동	: 준공(11.01.)

◦ 주천 가송	: 준공(08.20.)

□ 금후계획

◦ 2020년 완료	: 3개 사업[군도29호선(지리산IC~아영면), 수지 남창, 이백 초촌]

◦ 2021년 완료	: 1개 사업(수지 호곡)

도로 유지관리사업

□ 개    요

◦ 총사업비 : 8,536백만원(국비 140, 도비 381, 시비 8,015)

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비(백만원)	비 고
합 계		21개 지구	8,536
읍면지역시도	관 내	4개 지구	1,304
농어촌도로	관 내	2개 지구	700
법정도로 유지관리	관 내	15개 지구	6,532

□ 추진실적(2019년) - 77개 지구 / 5,890백만원

◦ 읍면지역시도 유지관리

- 운봉 공안리 배수로 정비사업 외 21개소 900백만원 추진

◦ 농어촌도로 유지관리

- 이백면 내동삼거리 도로정비공사 외 21개소 900백만원 추진

◦ 법정도로 유지관리(재포장)

- 승사교~동림교 재포장공사 외 32개소 4,090백만원 추진

□ 금후계획

◦ 읍면지역시도·농어촌도로·동지역 법정도로 유지관리 추진 : `20. 1. ~ 12.

- 아스콘 재포장, 과속방지턱, 교량(터널) 유지관리, 배수개선, 시설물 정비 등

◦ 공사 완료 : 산동 석동마을, 군도 3호선 갓길, 인월 성산 진입로 정비,                   교량 내진보강, 고죽~갈치 교차로, 로드킬 방지, 시청로~영어마을 인도,                   조산교차로 회전로, 교량 내진보강(왕정·율천), 주천 용궁 스노우멜팅

◦ 공사 추진 : 사매~덕과 도로 구조개선

□ 도로 유지관리사업 세부내역(2020년)

사 업 명		사업위치	사업량	사업비 (백만원)	추 진
합 계			21개 지구	8,536
읍면지역시도 유지관리			4개 지구	1,304
	시도유지관리	관내	유지관리사업 1식	600
	산동 석동마을	산동면	진출입로 정비 L=0.25㎞	200	`19 : 150
	군도 3호 갓길 포장(방촌)	금지면	아스콘 포장 L=0.4㎞	44
	주민참여예산(운봉, 산동 노암)	관내	유지관리사업 3개소	460
농어촌도로 유지관리			2개 지구	700
	농어촌도로 유지관리	관내	유지관리사업 1식	600
	인월 성산 진입로 정비	인월면	도로 시설개량 L=0.15㎞	100
법정도로 유지관리			15개 지구	6,532
	도로 유지관리보수(시가지)	관내	유지관리사업 1식	500
	사매~덕과 도로 구조개선	사매면, 덕과면	도로 시설개선 L=4.3㎞	200
	시청로~영어마을 인도 정비	도통동	인도 및 도로 구조개선 L=0.26㎞	500
	식정~요천마을 인도 설치	식정동	인도개설 L=0.5㎞	300
	걷고 싶은 거리 조성	관내	인도 유지관리 L=5.1㎞	500
	고죽~갈치 교차로 도로	고죽동	도로 확포장 L=0.43㎞, B=25m	500	`17 ~ `19 : 2,100
	조산교차로 회전로 설치	조산동	회전교차로 1식	280	국 140 시 140
	법정도로 재포장	관내	아스콘 재포장 L=13.3㎞	1,500
	주천 용궁 스노우멜팅	주천면	스노우멜팅 설치 L=0.13㎞	72	도 36 시 36
	로드킬 방지 도로시설물	관내	로드킬 휀스 L=7.1㎞(관문도로)	150	`19 : 150
	교량(터널) 유지관리	관내	교량 유지보수(시특법 6개)	300
	법정관리 대상시설물 정밀 안전점검	시특법 2종 5개소	정밀 안전점검 1식	150	소방 45 시 105
	노후교량 정밀 안전진단	의총교 축천교	정밀 안전진단 1식	80
	시특법 교량 내진보강	남원대교 동림교	내진보강공사 1식(받침교체)	500	`19: 1,100
	교량 내진보강(왕정, 율천)	왕정교 율천교	내진보강공사 1식(받침교체)	1,000	소방 300 시 700

2019~2020 도로 설해대책

□ 개    요

◦ 운영기간 : `19. 11. 15. ~ `20. 3. 15.(4개월간)

◦ 제설대상 : 법정관리도로 총 57개 노선 431.5km

계		시 관리국도		지 방 도		시 도		읍면시도(군도)
노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량
57	431.5	3	25.1	8	154.9	24	38.5	22	213

◦ 제설인력 : 23명(도로보수원 10, 운전원 9, 상황실 4)

◦ 제설차량 : 13대[15톤: 6(임차3), 5톤: 2(임차1), 1톤: 4(임차2), 굴삭기: 1]

◦ 제설장비 : 276대[제설기: 12, 살포기: 12, 읍면동: 252(트랙터용 제설기)]

◦ 제설자재 : 염화칼슘 350톤, 소금 1,500톤, 친환경 제설제 500톤

◦ 상황실운영 : 건설과(2개조 4명), 각 읍면동사무소

□ 추진실적

◦ 트랙터용 제설기 구입 및 보급(10대)                  : `19. 2. 21.

◦ 제설기 및 살포기 사전정비[(주)이텍네트워크]          : `19. 9. 30.

◦ 제설자재 확보(모래 300㎥, 모래주머니 2만 5천개)      : `19. 9. 30.

◦ 설해대책 추진 읍면동 협조체계 요청                  : `19. 10. 1.

- 홍보사항 전달 및 단계별 비상근무 체계·비상연락망 구축

◦ 미끄럼주의 표지판(22개) 및 모래주머니(2만개) 설치    : `19. 10. 30.

◦ 1톤 차량용 살포기 구입/2회 추경                     : `19. 11. 27.

◦ 트랙터용 제설기 구입 및 보급(30대)/2회 추경          : `19. 11. 29.

◦ 제설차량 임차 계약(15톤 3대, 5톤 1대, 1톤 2대)  : `19. 12. ~ `20. 2.

□ 금후계획

◦ 제설대책 상황실 및 제설봉사대 운영	: `19. 11. 15. ~ `20. 3. 15.

◦ 정령치 구간 겨울철 차량 통행금지	: `19. 12.  2. ~ `20. 3. 27.

지방하천 정비사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 아영면 풍천 외 3개소

◦ 사업기간 : 2012 ~ 2022년(11개년)

◦ 총 계 획 : 21개 지구 / 98.43㎞ / 190,771백만원

- 완료지구 : 13개 지구 / 45.05㎞ / 105,918백만원

(송내천, 내척천, 괴양천, 진기천, 백암천, 운교천, 풍천, 요천, 수외천, 수지천, 주촌천, 갈치천, 람천)

- `20년 사업 : 4개 지구 / 13,470백만원(도비 9,429, 시비 4,041)

하천별	지구별	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2020	2021이후
합 계	4개하천	22.94	78,128	27,044	13,470	37,614	35
풍 천	소 계	5.50	37,351	16,008	5,800	15,543	43	`14 ~ `22
	청계지구	0.88	6,961	6,961			100	`17년준공
	풍천지구	4.62	30,390	9,047	5,800	15,543	30	`18 ~ `22
송치천	주천송치	2.04	9,466	6,796	2,670		72	`16 ~ `20
원천천	신촌~주천	13.7	23,583	3,200	3,000	17,383	14	`17 ~ `22
다산천	덕과만도	1.7	7,728	1,040	2,000	4,688	13	`18 ~ `22

※ 지방하천(2개소)『익산지방국토관리청』실시설계 총사업비(3차)승인 완료

┍ 원천천 : 당초(MP) 18,821백만원 ⇨ 설계금액23,583백만원(증 4,762 / 증 25.3%)

┕ 다산천 : 당초(MP)  4,554백만원 ⇨ 설계금액 7,728백만원(증 3,174 / 증 69.7%)

□ 추진실적

◦ 풍  천(인월·두락·의지) : 1차분 시행(두락지구 L=1.2km) 교량 2개소 등  / 공정률 30%

◦ 송치천 : (3차분) 타절준공, 잔여분 공사 발주         / 공정률 72%

◦ 원천천 : 익산청(3차) 승인, 도 기술심의, 1차분 착수   / 공정률 14%

◦ 다산천 : 익산청(3차) 승인, 설계 기술자문, 1차분 착수 / 공정률 13%

□ 금후계획

◦ 2020년 완료 : 1개 사업(송치천)

◦ 2022년 완료 : 3개 사업(풍천, 원천천, 다산천)

원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도통동 인도교 ~ 주천면 고기리 일원

◦ 사 업 량 : 관광자원화 친수공간 조성 L=13.7㎞

- 축제 2.78km, 호안 5.16km, 자전거길 6.6㎞, 보․낙차공 12개소, 교량 9개소 등

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2022년(6개년)

◦ 총사업비 : 23,583백만원(국비 1,600, 도비 14,908, 시비 7,075)

※ 『익산지방국토관리청』 실시설계(3차) 협의 승인(‘19.11.4.)

- 당초(MP) 18,821백만원 ⇨ 설계금액 23,583백만원(증 4,762 / 증 25.3%)

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진                          : `16.  9. 28.

◦ 용역 중간보고회 개최(시장)	: `18.  8.  3.

◦ 주민설명회 개최	: `18. 11. 29.

◦ 실시설계(안) 총사업비 변경 협의(1차) 요청 / 익산청   : `19.  3. 29.

- 사업비 : 당초 MP상 18,821백만원 → 24,147백만원(증 5,326)

◦ 설계VE 완료(총사업비 100억원 이상 건설공사)         : `19.  5.  3.

◦ 실시설계(안) 총사업비 변경 협의(2차) 요청 / 익산청    : `19.  7. 19.

- 사업비 : 당초 MP상 18,821백만원 → 23,139백만원(증 4,318 / 증 23%)

◦ 지방건설기술심의(전북도)                            : `19.  9. 23.

◦ 조달청 원가심사 및 공사발주 의뢰                    : `19. 10.  8.

◦ 실시설계(안) 총사업비 변경 협의(3차) 승인 / 익산청    : `19. 11.  4.

- 사업비 : 당초 MP상 18,821백만원 → 23,583백만원(증 4,762 / 증 25.3%)

◦ 시설공사 도급업체 개찰(조달청)                       : `19. 12.  3.

□ 금후계획

◦ 편입용지 분할측량 및 보상계획 공고	: `20.   1. ~

◦ 시설공사(총괄) 착공 및 준공	: `22. 12.

소하천정비 종합계획 재수립 용역

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 관내 소하천 347개소(L=389.6㎞)에 대한 종합계획 재수립

◦ 총사업비 : 5,837백만원(시비 100%)

◦ 용역기간 : 2015 ~ 2019년(5개년)

◦ 용역대상 : 347개소 / L=389.6㎞를 2개 권역으로 용역 발주

(단위 : 백만원)

권 역 별	사업량	총사업비	투자	용역기간
합 계	347개소/L=389.6㎞	5,837	5,837	`15 ~ `19
섬진강 권역	272개소/L=292.4㎞	3,572	3,572	‘15 ~ ‘19
낙동강 권역	75개소/L=97.2㎞	1,315	1,315	‘16 ~ ‘19
전략환경평가	전구간	950	950	‘17 ~ ‘19

□ 추진실적

◦ 소하천정비 종합계획 재수립 용역 시행

- 섬진강 수계 : `15. 7. 31. / 낙동강 수계 : `16. 4. 15. / 전략환경영향평가 : `17. 9. 20.

◦ 소하천 중복지정 관리기관 협의(한국농어촌공사 남원지사) : `15. 10. / `18. 11.

◦ 전북도 자연재난과 협의(1차) 및 검토의견 반영  : `19. 4. 4. ~ 4. 29.

◦ 전략환경영향평가(본안) 협의요청               : `19. 6. 5.

◦ 기초 소하천관리 위원회 심의(서면심의)         : `19. 7.

◦ 광역 소하천관리 위원회 심의 요청(시→도 자연재난과) : `19. 11. 4.

◦ 전북도 자연재난과 및 관련실과 협의           : `19. 12.

◦ 소하천 지정(신규·폐지·조정)(안)

수 계	당 초		변 경		증 ․ 감(△) 연장(km)	증 ․ 감(△)률 연장(%)	비 고
	개소	연장(km)	개소	연장(km)
합 계	349	392.1	311	386.3	△5.8	△1.5	∘폐지:59개소 ∘신규:21개소
섬진강	274	294.9	240	291.4	△3.5	△1.2	∘폐지:53개소 ∘신규:19개소
낙동강	75	97.2	71	94.9	△2.3	△2.4	∘폐지: 6개소 ∘신규: 2개소

◦ 광역 소하천관리 위원회 심의(도 자연재난과)    : `19. 12. 10.

□ 금후계획

◦ 소하천대장 전산화 및 지형도면고시, 사업완료   : `20. 2월까지

소하천 정비사업

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 30개 지구 / 20.78㎞ / 44,511백만원

- 완료지구 : 6개 지구 / 4.31㎞ / 13,417백만원

(뒤하천, 율치천, 율정천, 아곡천, 신동천, 장교천)

- `20년 사업 : 7개 지구 / 6,144백만원〔시비 6,144(100%)〕※ 균특 지방이양에 따른 시비 부담금 증액

◦ 위    치 : 수지면 고평천 외 6개소

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2023년(8개년)

구분	지구별	위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
				계	기투자	2020	2021이후
합 계		7개 하천	10.76	29,970	11,216	6,144	12,610	57
보조	소계	5개 하천	7.35	26,870	8,116	6,144	12,610	53
	고평천	수지 고평	2.30	7,745	5,524	2,221		100	‘16~‘20
	당동천	아영 봉대	2.69	10,711	2,220	1,830	6,661	37	‘18~‘22
	오롱골천	운봉 주촌	0.82	1,865	372	1,493		100	‘19~‘20
	과립천	이백 과립	2.20	4,180		300	3,880	7	‘20~‘23
	산곡천	향교동	1.25	2,369		300	2,069	12	‘20~‘22
자체	소계	2개 하천	1.85	3,100	3,100			100
	천사천	월락동	0.50	1,600	1,600			100	‘19~‘20
	양선천	덕과 신양	1.00	1,500	1,500			100	‘19~‘20

□ 추진실적

◦ 고평천 : 4차분 추진(하천정비 L=0.8km) 및 교량 2개소 등 / 공정률 95%

◦ 당동천 : 1차분 추진(하천정비 L=0.8km) 및 교량 3개소 등 / 공정률 5%

◦ 오롱골천 : 실시설계 용역 사전설계검토 완료 및 원가심사 예정(전북도)

◦ 과립천, 산곡천(신규) : 사업 확정 및 2020년 사업계획서 제출

◦ 천사천, 양선천 : 시설공사(총괄) 추진 및 편입토지 보상 / 공정률 30%

□ 금후계획

◦ 2020년 완료 : 4개 사업[고평천, 오롱골천, 천사천, 양선천]

◦ 2022년 완료 : 2개 사업[당동천, 산곡천(신규)]

◦ 2023년 완료 : 1개 사업[과립천(신규)]

요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성

< 요천 수변 관광자원화 사업 >

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 어현동 741번지 일원 / 요천 국가하천[고수부지/천변친수지구]

◦ 사 업 량 : 물놀이 분수광장 조성

- 음악분수 L=42m, 바닥분수 2개소 및 광장, 물놀이시설 A=1,170㎡

◦ 총공사비 : 9,300백만원[도비(동부권특별회계) 4,300, 시비 5,000]

- `20년 사업비 : 5,800백만원(도비 4,300, 시비 1,500)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2020년(4개년)

□ 추진실적

◦ 요천 내 수경시설 설치 추진계획 보고           : `17.  6. 28.

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진                   : `17. 10. ~ `18. 12.

◦ 사업계획 변경 추진보고                       : `18. 11. 23.

※ 당초 : 수경시설(분수) / 중앙저수로 ⇨ 변경 : 물놀이 분수광장 / 고수부지

◦ 음악분수 공법선정 심의 완료                  : `19.  6. 17.

◦ 2019년 제2차 재정투자 재심의 완료(전북도)     : `19.  6. 28.

◦ 원가심사 및 공사발주 의뢰(조달청)             : `19.  8. 26.

◦ 하천점용허가 승인(익산청)                     : `19.  9. 30.

◦ 시공업체 선정 및 계약 착수	: `19. 10. 29.

- 새움종합건설 대표이사 : 안석문[전주시 완산구 우전로 260 세움펠리피아빌딩 3층]

□ 금후계획

◦ 시설공사 추진	: `19. 12. ~ `20. 5.

◦ 음악분수 및 물놀이 시설 운영	: `20.  6. ~

하천 유지관리사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 소하천·지방하천·국가하천 일원

◦ 사 업 량 : 3개 사업 / L =79.3km

◦ 사 업 비 : 2,962백만원(국비 944, 도비 152, 시비 1,866)

◦ 사업기간 : 2020년

구 분	사업내용	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
합 계	3개 사업	79.3	2,962
하천 유지관리사업	하천 유지관리	15.0	600
	하천 하도준설	20.0	500
	주민참여예산	3.1	614
기성제 유지관리사업	지방하천 기성제 정비	2.3	304
국가하천 유지보수사업	섬진강, 요천 유지관리	38.9	944

□ 추진실적

【하천 및 기성제 유지관리사업】

◦ 하천유지관리사업 추진	: `19. 1. ~ 12.

- 하도준설 이백면 백암천 외 47개소(L=21.3km) 중 44개소 완료(L=19.5km) 및 6개소 추진 중

- 유지관리 대산면 신촌천 외 35개소(L=5.78km) 중 28개소 완료(L=5.0km) 및 11개소 추진 중

【국가하천 유지보수사업】

◦ 국가하천 시특법 2종 시설물 보수공사 추진(15개소)   : `19. 8. 1. ~

◦ 국가하천 요천 하도정비공사 완료           : `19. 10. 22. ~ 11. 22.

◦ 국가하천 요천 제방보수공사 완료           : `19. 10. 22. ~ 11. 21.

□ 금후계획

◦ 2020년 하천유지관리사업 및 하도준설사업 실시설계 및 공사추진 : `20. 1. ~ 11.

- 공사추진 : 관내 하천(지방하천·소하천) 유지관리 및 하도준설(40.4km)

◦ 국가하천(섬진강·요천) 유지관리사업 실시설계 및 공사추진 : `20. 1. ~ 11.

- 공사추진 : 관내 하천(국가하천) 유지관리 및 하도준설(38.9km)

하천 유지관리사업(보조)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 소하천·지방하천 일원

◦ 사 업 량 : 3개 사업 / L =0.5km

◦ 사 업 비 : 510백만원(도비 174, 시비 336)

◦ 사업기간 : 2020년

구 분	사업내용	사업량 (km)	사업비(백만원)
			계	도비	시비
합 계	3개 사업	0.5	510	174	336
하천 유지관리사업 (보조)	풍촌천 소교량 재가설공사	1식	150	60	90
	함파소하천 재해위험시설 정비사업	0.35	300	90	210
	감성소하천 재해위험시설 정비사업	0.15	60	24	36

□ 추진실적

◦ 사업계획서 제출 및 사전내시 통보(전북도)   : `19. 9. 2. ~ 11. 8.

◦ 신규사업 실시설계 용역 추진	: `19. 12. ~ `20. 2월 말

□ 추진계획

◦ 행정절차 이행(원가심사 등) 및 공사 추진    : `20. 3. ~

□ 기대효과

◦ 재해 가능성이 높은 소하천의 정비를 통한 안전한 하천환경 조성 기여

- 신규 소하천 3개소는 매년 하상 토사퇴적으로 준설이 빈번하고,

하천제방 법면이 토사로 형성되어 치수 기능성이 저하됨

- 구조물의 노후화로 인하여 집중호우나 태풍 시 재해 가능성이 높은 하천으로,        금회 신규사업으로 정비하여 치수 향상 및 안전한 하천 환경 조성으로        인근 주민 생명과 재산 보호