2020. 1.

2020년 주요업무 계획

환   경   과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2019년 주요업무 결산

□ 2020년 중점 추진방향

□ 2020년 주요업무 계획

◦ 주촌천 생태하천 복원사업

◦ 생물테마 전시체험시설 조성

◦ 기후변화대응 녹색도시 조성

◦ 자원순환 사회 및 클린남원 만들기

◦ 남원시 매립장 증설사업

◦ 대형폐기물 모바일 배출 신고제

◦ 국립공원 구역 조정

◦ 맑은 하늘이 열리는 미세먼지 저감사업

◦ 유해야생동물 관리 및 피해예방 추진

◦ 환경오염 사전예방을 위한 관리강화

◦ ASF 예방을 위한 광역수렵장 운영

◦ 청결한 공중화장실 관리

◦ 슬레이트 처리 지원

◦ 악취배출원 관리 및 저감사업 추진

일  반  현  황

□ 기    구

				환 경 과 장
				왕 길 성
환경행정담당			청소담당			환경지도담당					폐기물자원담당
윤 종 철			안 동 준			최 은 주					유 홍 규
□환경보전 중장기계획 수립 □생태하천 복원사업 □생태관광지 조성사업 □생태계교란생물퇴치사업 □수질오염 총량관리 □전기자동차 보급사업 □환경단체 지원 및 관리 □기후변화 적응대책 □지하수개발․이용신고 □토양오염유발시설관리 □환경개선부담금 부과징수			□매립장조성 및 관리 □광역재활용선별시설 운영 □생활ㆍ음식물ㆍ재활용품 쓰레기 수거처리 □과대포장 및 1회용품 관리 □음식물폐기물 배출사업장 관리 □환경관리원 복무관리 □영농폐기물 수거운반 □재활용품 자원순환 업무 □쓰레기 불법투기 단속			□배출사업장 관리 및 인허가 (대기,수질,소음진동,비산먼지) □야생동물관리 및 피해예방 □국립공원 구역조정 및 관리 □대기측정망 운영·관리 □미세먼지 사업총괄 □운행차 저감사업 및 단속 □석면 및 실내공기질관리 □이백내기마을 암발생 역학조사 후속대책 추진					□사업장ㆍ건설폐기물 관리 (사업장일반, 건설, 지정) □가축분뇨 배출시설 인허가 및 관리 □가축사육제한지역 지정 고시 □개인하수처리시설 설치 신고 및 관리 □슬레이트 철거지원 사업 □공중화장실 관리 □분뇨수집운반업 신고 및 관리 □고물상 폐기물관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	35	1	6	10	13	5
현 원	35	1	6	13	7	8
증 감	-	-	-	3	△6	3

2019년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 2019 전라북도 저탄소생활 실천운동 실적평가 최우수상 수상(4년 연속) ◦ 광역재활용품 기계화선별시설 효율적 운영 및 매립장 확장사업 추진 ◦ 미세먼지 저감사업 확대 추진 및 악취 모니터링 시스템 구축

□ 기후변화 대응 및 수생태계 보전으로 녹색도시 구축

◦ 2019년 탄소포인트제 가입 : 1,003세대(누적 22,753세대 / 전체세대수 중 59%)

◦ 온실가스 에너지 진단컨설팅 실시(512건) 및 녹색아파트사업 추진(2개소)

◦ 친환경차 민간보급 확대 : 전기자동차 30대, 전기이륜차 5대

◦ 옛도랑복원사업(주천내송), 생태계교란 외래어종 수매, 토종어류 방류사업

□ 삶의 질 향상을 위한 쾌적한 생활환경 조성

◦ 광역재활용품 기계화선별시설 효율적 운영 : 매각 868톤, 2억원/운영비 4.6억원

- 폐기물시설 견학, 분리배출 교육(전 직원, 통리장 등), 자원봉사단 운영 등

◦ 청결의 날 운영 7회, 영농폐기물 집중수거 1,332톤, 하천쓰레기 수거 8명/131톤 등

◦ 폐건전지 및 우유팩 교환사업 : 폐건전지 4,570㎏, 종이팩 7,950㎏ 수거

◦ 대산매립장 확장사업 추진(공정률 44%) 및 동네마당 설치(13개소) 등

□ 시민이 체감하는 환경오염 저감사업 확대 추진

◦ 환경오염 사고대비 상시 대응체계 구축으로 휴일 환경 불편사항 신속처리

◦ 노후경유차 대폭 감소로 미세먼지 저감 촉진 : 21% 감소(8,049대⇢6,352대)

◦ 건설·기계 매연저감장치, 엔진교체 등 신규지원 및 운행제한시스템 구축

◦ 영세사업장 저감시설 지원 신규시행 : 대기방지시설 12개소, 저녹스버너 3대

□ 폐기물 적정처리로 건강하고 안정적인 생활환경 조성

◦ 폐기물 불법 처리에 따른 감시 강화 : 17건(불법매립 1, 처리시설 부적정 운영 16)

◦ 슬레이트 안정적 처리로 건강하고 쾌적한 주거환경 개선 : 281동 613백만원

◦ 가축분뇨 배출시설 적법화 추진 : 602개소(완료 236, 추진 중 366)

◦ 악취발생사업장 25개소 중점관리 및 모니터링 시스템 7개소 설치 운영

	아쉬운 점
◦ 경기 악화에 따른 경제적 이익을 위한 폐기물 불법매립행위 증가 ◦ 불법행위에 따른 도덕적 해이 근절을 위해 지속적인 홍보 및 단속 추진

2020년 중점 추진방향

자연과 인간이 함께하는 청정도시 조성

	중 점 추 진 과 제
◦ 기후변화대응 녹색도시 조성 - 녹색생활실천 촉진 및 탄소포인트제 가입 확대 - 활력 넘치는 건강한 수생태계 조성 ◦ 자원순환 및 클린도시 만들기 - 범시민 분리배출 교육·홍보 및 청결의 날 행사 - 생활쓰레기의 안정적 처리를 위한 매립장 증설 및 동네마당 사업 추진 - 대형폐기물 모바일 배출 신고제 실시 ◦ 환경민원대응 역량강화 - 환경오염 배출사업장 기술지원 및 지도점검 - 생활환경 불편민원 신속대응 - 시민건강 보호를 위한 슬레이트 처리

2020년 주요업무 계획

주촌천 생태하천 복원사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 노암동 롯데슈퍼 ~ 어현목기단지(L=2.0㎞)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2022년

◦ 사 업 비 : 9,444백만원(균특 2,135, 도비 2,587, 시비 4,722)

◦ 사업내용 : 생태수로 정비(2,625m), 생태관찰로(570m), 보축(1,423m), 생태여울 3개소, 친수공간 조성(3,600㎡) 등

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진	: 2017. 04. ~ 2019. 09.

◦ 주민설명회 실시(노암동)	: 2018. 05. 24.

◦ 실시설계(안) 기술검토(전북지방환경청)	: 2018. 07. ~ 2019. 02.

◦ 생태하천복원 심의위원회 심의(도)	: 2019. 04. 16.

◦ 입찰공고 및 계약(조달청)	: 2019. 09. ~ 11.

◦ 공사 착공(1차분)	: 2019. 12. 04.

□ 금후계획

◦ 공사 추진(1차분)	: 2019. 12. ~ 2020. 11.

- 생태수로 정비 및 친환경호안(L=2,625m) 조성

◦ 토지매입 추진(공고, 협의보상 등)	: 2020. 01. ~ 03.

◦ 생태하천 복원 및 친수공간 조성 벤치마킹	: 2020. 03. ~ 08.

◦ 2차분 공사계약 추진	: 2020. 11.

◦ 공사 준공(전체분)	: 2022. 06.(예정)

생물테마 전시체험시설 조성

□ 개    요

◦ 위    치 : 백두대간 생태교육장 전시관 주변

◦ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2020. 6월

◦ 사 업 비 : 23억원(국비 11.5, 도비 5.75, 시비 5.75)

◦ 사업내용 : 테마별 생물전시체험시설(올빼미, 곤충, 민물고기 등), 휴게공간 조성 등

□ 추진실적

◦ 생물테마 전시체험시설 실시설계 용역 완료   : 2018. 09.

◦ 생물테마 전시체험시설 건축공사 추진	: 2018. 11. ~ 2019. 08.

- 건축, 전기, 통신, 소방

◦ 생태관광사업 추진방향 협의(도)              : 2019. 05. 14.

◦ 생물테마 전시체험시설 수조 및 생물 조정	: 2019. 09. ~ 10.

◦ 휴게공간 조성(곤충온실 리모델링) 설계용역 추진 : 2019. 10. ~ 12.

◦ 생물테마 전시체험시설 전시공사 발주	: 2019. 12.

- 인테리어, 수조, 생물 분리 발주

□ 금후계획

◦ 생물테마 전시체험시설 전시공사 추진	: 2019. 12. ~ 2020. 06.

◦ 휴게공간 조성(곤충온실 리모델링) 공사 추진  : 2020. 01. ~ 04.

◦ 생태관광 벤치마킹 및 컨설팅	: 2020. 01. ~ 04.

◦ 생태관광 사업 평가 및 협의	: 2020. 02. ~ 03.

기후변화대응 녹색도시 조성

□ 개    요

◦ 탄소포인트제 확대 추진(자동차 탄소포인트) 및 인센티브 지급

- 탄소포인트 130백만원(상·하반기), 자동차 탄소포인트 1백만원(연 1회)

- 온실가스 감축을 위한 탄소포인트제 가입 등 녹색생활 실천홍보 및 교육

◦ 비산업부문 온실가스 저감사업 추진 : 19백만원

- 온실가스 진단 컨설턴트(가정, 상가 등) 양성 및 에너지 진단사업 전개

- 녹색아파트 사업, 온실가스 목표관리제 운영

◦ 친환경차 민간보급사업 추진

- 전기자동차 20대, 340백만원 / 전기이륜차 5대, 12백만원

□ 추진실적

◦ 탄소포인트제 가입 추진 : 1,003세대(누적 22,753세대), 가입률 59.3%

◦ 녹색생활 실천 홍보 및 캠페인 전개 : 15회

- 기후변화주간, 친환경 교통주간, 쿨·온맵시 캠페인, 친환경 명절 보내기 등

※ 2019 전라북도 저탄소생활 실천운동 평가 최우수상 수상(4년 연속)

◦ 녹색아파트 사업 추진

- 주민교육 및 에너지진단컨설팅사업 추진, 에너지의 날 행사 추진 등

◦ 온실가스 진단컨설팅 추진 : 가정 448가구, 상가 64개소

◦ 친환경차 민간 보급 사업 : 전기자동차 30대, 전기이륜차 5대

□ 금후계획

◦ 탄소포인트제 운영·홍보 및 신규가입 추진	: 연중

- 가입목표 : 1,500세대 / 자동차 탄소포인트 20대

◦ 생활 속 온실가스 감축을 위한 시민 실천 운동 전개	: 연중

◦ 친환경차(전기자동차, 전기이륜차) 보급사업 추진	: 2020. 01. ~ 11.

◦ 온실가스 에너지진단컨설팅을 위한 홍보 및 진단	: 2020. 03. ~ 10.

◦ 녹색아파트 선정 및 사업 추진	: 2020. 04. ~ 10.

자원순환 사회 및 클린남원 만들기

□ 개    요

◦ 쓰레기 불법투기 단속 및 생활(음식물)쓰레기 감량·재활용 분리배출 홍보

◦‘Clean 남원 청결의 날’운영 및 시민 참여‘행복홀씨 입양사업’추진

◦ 일반쓰레기·재활용·음식물·대형폐기물 등 쓰레기 신속한 수거처리

◦ 영농폐기물 집중 수거로 환경오염 방지 및 청결유지

◦ 하천 및 주변 환경 쓰레기 수거로 오염방지 등

□ 추진실적

◦ 생활쓰레기 분리배출 교육 및 홍보

- 교육(전 직원, 통리장 등), 홍보물 제작 배부(40,000부), 폐기물시설 견학(10개 단체, 225명)

- 자원봉사단을 운영(읍면동별 5명씩 선발)하여 학교, 기관, 단체, 마을 등 방문

- SNS, 새올게시판, 지역언론, 아파트엘리베이터 LED, 전광판, 통·리장 등

◦ 재활용품 수시 선별 매각	: 868톤 / 195.9백만원

◦ 폐건전지(4,570kg), 폐형광등(13,586kg), 종이팩(7,950kg) 수거

◦ 영농폐비닐 수거 : 1,332톤(목표량 1,325톤의 101%  ※ 2019.10.31. 기준

◦ 쓰레기 불법투기 및 소각 과태료 부과	: 51건 / 8,740천원

◦‘Clean 남원 청결의 날’운영	: 7회(7,133명 참여, 124톤 수거)

◦ 행복홀씨 입양사업 추진	: 11개 단체 협약(303명)

□ 금후계획

◦ 생활쓰레기 분리배출 교육 및 홍보

- 폐기물처리시설 견학, 읍면동 자원봉사자 모집 운영, SNS, 지역언론 등

◦ 광역재활용기계화 선별시설 효율적 운영  : 선별, 매각 등

◦ 재활용 동네마당(10개소) 및 영농폐비닐 집하장(5개소) 설치사업 추진 : 상반기 중

◦ 종이팩 및 폐건전지 교환 사업 추진	: 연중

◦ 영농폐기물(폐비닐, 농약빈병, 잔류농약, 부직포 등) 수거	: 연중

◦‘Clean 남원 청결의 날’행사	: 2020. 03. ~ 11. / 월 1회

◦ 행복홀씨 입양사업 청소 추진	: 연중

◦ 쓰레기 불법투기 지도 단속	: 1개반 3명 / 연중

◦ 하천쓰레기 정화사업 추진	: 2020. 03. ~ 09. / 1일 9명

남원시 매립장 증설사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 대산면 노산하대길 134(대산매립장)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2020년

◦ 총사업비 : 91.2억원(국비 25.6, 시비 65.6)

- 1차분 29.1억(도급 23.2, 관급 5.9), 2차분 35.2억(도급 23.9, 관급 11.3), 잔여분 26.9억

◦ 사업내용 : 매립용량 266,251㎥, 매립면적 26,096㎡, 매립고 18m

※ 사용기간 : 2022 ~ 2032년(기존 매립장 사용기한 : 2022. 6월)

□ 추진실적(공정률 44%)

◦ 실시설계용역 완료	: 2018. 05. 04.

◦ 공사(1차분) 착공	: 2018. 08. 20.

◦ 폐기물처분시설 설치승인(도)	: 2018. 11. 30.

◦ 공사(1차분) 준공	: 2019. 11. 12.

- 진입도로 확장, 기존 구조물 철거, 3·4단부 토공, 관로(우수, 침출수, 지하수) 매설 등

◦ 공사(2차분) 착공	: 2019. 11. 12.

- 1·2단부 토공, 유량조정조 설치, 차수재 설치 등

□ 금후계획

◦ 폐기물매립시설 중간 설치검사(한국환경공단)	: 2020. 03.

- 환경부 고시 제8조 관련 환경부령으로 정하는 검사기관 의뢰

◦ 공사(2차분) 준공	: 2020. 06.

◦ 공사(잔여분) 계약 및 추진	: 2020. 06. ~ 10.

- 가스포집정 설치, 출입문 설치, 진입도로 포장 등

◦ 최종 준공	: 2020. 10.

대형폐기물 모바일 배출 신고제

□ 개    요

◦ 필 요 성 : 맞벌이부부가 증가함에 따라 주중에 신고할 시간이 없어 기존 배출방법과 병행하여 주말에도 신고가 가능토록 도입하고자 함

◦ 사 업 비 : 8,400천원(앱 사용료 2,400, 수수료대행 6,000)

◦ 추진방법 : 모바일 앱“여기로”서비스 이용 추진

◦ 이용방법 : 모바일 앱“여기로”설치 ⇨ 대형폐기물 배출 신고(사진 필) ⇨ 수수료 결제(카드 및 계좌이체) ⇨ 배출번호 기재 후 배출 ⇨ 수거

□ 추진실적

◦ 모바일 배출 신고제 홍보 추진                   : 2019. 12. ~

- SNS(12개 여성단체 등), 홍보물 배부, LED 전광판 송출, 자원봉사자 교육 추진 등

◦ 모바일 배출 신고제 교육(읍면동 환경담당자, 수거팀)	: 2019. 12. 11.

□ 추진계획

◦ 모바일 배출 신고제 추진                        : 2020. 01. ~

◦ 모바일 배출 신고제 지속적 홍보 추진            : 2020. 01. ~

□ 기대효과

◦ 시간과 장소에 구애받지 않고 신고가 가능하기 때문에 시민들의 불편 감소

국립공원 구역 조정

□ 개    요

◦ 위    치 : 지리산국립공원 남원시구역(112㎢, 23%) *총면적 483㎢

◦ 추진배경 : 자연공원법 제15조에 따라 10년마다 공원계획 검토·변경

◦ 조정주체 : 환경부 ☞ 제3차 검토·변경은 2020. 12월 예정

◦ 용역추진 : 2018. 12. ~ 2020. 12.(24개월) / 223백만원 / 한국자연공원협회

- (1차분) 2018.12.~2019.12. 156백만원 / (2차분) 2020.01.~12. 67백만원

◦ 내    용 : 국립공원 구역 조정, 계획변경을 위한 타당성 분석검토 연구용역

□ 추진실적

◦ 읍면 순회 주민설명회(7회, 154명) 및 의견수렴	: 2019. 02. ~

- 환경부기준, 용역진행사항, 제출의견 검토 및 추가의견 반영 등

◦ GIS활용 각종평가 및 기준검토를 통한 조정(안) 작성	: 2019. 06. ~ 08.

◦ 용도지역지구 일치여부 확인 등 현장조사(환경과장 외 8개 마을대표 등)  : 2019. 09. 27.

- 주민요구사항 : 마을부지 경계확장, 마을주변 농경지 및 기개발 임야 해제 요청

- 해제요구지역 : (산내면) 97명 251필지 / (주천면) 7부능선 이하 해제 요청

□ 금후계획

◦ 환경부 생태기반평가 및 공원별 적합성평가 용역에 우리시 의견 적극 반영 요청(우리시 자체 용역 내용 활용)

◦ 지리산 국립공원 전북사무소와 지속적인 협의 추진

- 지리산 국립공원 지역협의체 활용(9명)

◦ 산내 및 주천면지역 주민과 지속 소통(자료공개 및 의견수렴)

◦ 환경부 제3차 협의 시 우리시 조정안 건의 및 검토·조정 : 2020. 05. ~

◦ 국립공원 계획 확정(환경부)                           : 2020. 12.

맑은 하늘이 열리는 미세먼지 저감사업

□ 개    요

◦ 대기오염 측정망 24시간 상시 운영 : 죽항동 주민센터 옥상

◦ 대기질 실시간 공개 : 에어코리아, 시 홈페이지, 전광판, 미세먼지신호등

- 초미세먼지(PM2.5) : 2018년 22㎍/㎥(도 평균 24㎍/㎥) / 2019.7.~11월 14㎍/㎥(전년 19㎍/㎥)

◦ (평상시) 저감사업 추진(4,758백만원) + (고농도) 비상저감조치 시행

□ 추진실적

◦ 고농도 미세먼지 비상저감조치 시행(8회) 및 모의훈련	: 2019.02.~03. / 11.15.

◦ 운행경유차 배출가스 저감사업 추진	: 2019. 01. ~ 12.

- 노후경유차 조기폐차(1,697대), LPG화물차(80대), 어린이통학차량 LPG전환(3대), 매연저감장치(경유차 17대, 건설기계 4대), 건설기계 엔진교체(14대)

◦ 고농도시 5등급차량 운행제한 홍보 및 단속시스템 구축  : 2019. 05. ~ 12.

◦ 미세먼지알리미 신호등 설치(4개소) / 마스크 보급(25,660개)  : 2019. 10.

◦ 대기방지시설 지원대상 선정(12개소) 및 저녹스버너 보급(3대)  : ~ 2019. 12.

□ 금후계획

◦ 미세먼지 저감사업 지속 추진                         : 2020. 01. ~

- 조기폐차 1000대, LPG신차 20대, 어린이통학차량 15대, 경유차DPF 20대, 건설기계DPF 10대, 건설기계 엔진교체 10대, 저녹스버너 2대, 대기방지시설 지원 20개소

- 미세먼지 쉼터(152개소) 지정 및 도로 재비산 먼지(6km) 집중관리

- 고농도 비상저감조치 대비 미세먼지 1사 1도로 지정 협약 추진

◦ 미세먼지 발생사업장(비산먼지, 운행차 단속 등) 지도점검 강화	: 2020. 01. ~

- 도 연계 운행차 단속시스템 구축 및 고농도 시 단속 시행

- 다중이용시설(어린이집, 노인요양시설 등) 실내 공기질 특별점검

- 미세먼지 배출감시원 운영(국비지원) 및 상시 지도단속 강화

◦ 미세먼지 국민대응요령 홍보 확대                     : 연중

- 5등급 차량 운행제한 안내 및 홍보, 미세먼지 바로알기 교육 등

유해야생동물 관리 및 피해예방 추진

□ 개    요

◦ 유해야생동물 피해예방시설 설치비 지원(60%) : 79백만원

◦ 유해야생동물 포획을 통한 개체수 조정

- 생포용 포획틀 이용 자력구제 확대	: 100백만원(40개 마을)

- 수확기 야생동물 피해방지단 확대 운영 : 30~50명 / 3~12월

- 야생동물 포획보상금 지급             : 50백만원

◦ 유해야생동물에 의한 농작물피해 신속조사 및 보상 : 35백만원

◦ 야생동물 구조대 활동비 지원 : 야생동물보호협회 / 10백만원

□ 추진실적

◦ 야생동물 피해예방사업(99백만원)	: 83농가 23㎞

◦ 마을단위 포획틀 배치·운영(8개소)	:  11마리(멧돼지 4, 고라니 4, 기타 3)

◦ 야생동물포획 및 보상금 지급(51백만원)	: 834마리(멧돼지 200, 고라니 614, 조류 20)

◦ 수확기 피해방지단 운영(30명)	: 2019. 04. 15. ~ 11. 19.

◦ 유해야생동물 피해보상(18백만원)	: 40농가

◦ 야생동물 구조활동비 및 구조물품 지급(7백만원) : 32건

□ 금후계획

◦ (피해예방) 전기울타리, 울타리(농가), 포획틀(마을단위 순회) 설치 지원

- 수요조사 및 선진지 견학(1~2월), 현지조사 및 심사(2월), 설치 지원(3~12월)

◦ (개체수 조절) 수확기 피해방지단 확대 운영, 자가 및 대리포획 등

- 경찰서 협의, 방지단 간담회(2월), 피해방지단 확대 운영(50명 이내 / 3~12월)

- 피해우려지역 자가 및 대리포획 추진 / 포획보상금 지급(연중)

◦ (피해보상) 농작물피해 신속 피해조사 및 피해보상금 지급(연중)

◦ (야생동물 구조) 야생동물 구조활동 전개 및 활동비 지원(연중)

환경오염 사전예방을 위한 관리강화

□ 개    요

◦ 배출시설 현황 : 7,964개소

총계	수 질				대 기			폐 기 물
	소계	폐수	기타 수질	개인 하수	소계	대기	비산 먼지	소계	처리업	사업장	재활용	의료	지정
7,964	7,248	126	96	7,026	417	82	335	299	38	66	12	175	8

□ 추진실적

◦ 환경오염물질 배출사업장 정기·수시 지도점검	: 행정처분 42건

- 고발 5, 과태료 17, 경고 5, 영업정지 3, 과징금 1, 개선명령 3, 조치이행명령 8

◦ 환경신문고(128) 접수민원 및 생활불편 민원 처리	: 185건

- 대기 6, 폐수 31, 악취 17, 비산먼지 45, 소음·진동 53, 폐기물 33

◦ 주민 현장방문 및 주민의견 수렴	: 6회

◦ 민원다발사업장 민관합동 점검 실시	: 4회

□ 금후계획

◦ 생활과 밀접한 환경민원 신속·적극적인 대처로 시민만족 환경행정 추진

◦ 환경오염 배출사업장 관리 준수사항 안내를 통한 자율적 관리 도모

◦ 소규모 사업장 대기방지시설 및 저녹스버너 지원 추진 : 2020. 02. ~ 10.

◦ 사업장 분야별 통합 점검 실시 : 2개반 4명

- 1개 사업장 대기·수질·비산먼지·폐기물 분야 등 동시 지도점검

◦ 미세먼지 불법배출 상시예방 및 감시체계 구축 추진 : 2020. 02. ~ 12.

- 운행차 배출가스, 비산먼지, 미세먼지 비상저감조치 이행여부 확인

ASF 예방을 위한 광역수렵장 운영

□ 개    요

< ASF 발생현황  『심각단계』 >                                    <2019.12.16. 기준>

◈ 야생멧돼지(46건) : 경기 30건(연천 14, 파주 16), 강원 16건(철원 16)

□ 2019.10.28. 이후 : 전국 모든 지역 포획 멧돼지 자가소비 금지 □ 매몰, 소각, 랜더링

◦ 운영기간 : 2019. 11. 28. ~ ASF심각단계 해제 시까지(수렵장 2.29. 까지)

◦ 수렵장참여 : 419명[전북 156(남원 66), 이외 263]  ☞ 수수료 : 147백만원

◦ 설정면적 : 335.33㎢(제외 417㎢, 도시지역, 공원지역, 도로 100m 등)

◦ 포획승인 : 1인당 멧돼지 4, 고라니 2, 조류 45마리

◦ 운 영 비 : 209백만원(수렵장 102, 사체처리 107)

◦ 멧돼지 사체처리반 운영(2개반 8명)

- (집하장반) 대산매립장 / (매몰반) 시료채취, FRP저장조 활용 매몰

□ 추진계획

◦ ASF대응 방역 및 준수사항 교육 추진(22명)      : 2019. 10. 30.

◦ 남원시 수렵장 운영(임실, 장수, 진안)	: 2019. 11. 28. ~ 2020. 02. 29.

◦ ASF방역 및 예방 영상회의 참석(주 3회, 월․수․금) : ~ 해제 시까지

◦ (감시카톡방 운영) 밀렵감시·사체처리반 : 실시간 상황 유지 및 신속 민원 대응

◦ (안내문자 수시발송) 참여수렵인 총기안전, 준수사항, 사체처리 등

◦ 포획멧돼지 사체처리, 포상금 지급 및 매몰지 관리 : ~ 해제 시까지

- (포획보상금) 환경청, 20만원/마리 / (사체이송비) 남원시, 5만원/마리

- ASF검사 시료채취 및 분석의뢰(포획멧돼지 5~10%)

※ 2019. 12. 06. 까지 : 수렵장 43마리 포획 / 3마리 시료검사(음성)

◦ 수렵장 주민홍보, 마을방송 및 감시단 순찰 추진 : 2020. 02. 29. 까지

□ 기대효과

◦ 광역수렵장 운영을 통한 효율적인 야생동물 포획으로 개체수 조절 유도

◦ ASF감염 확산 우려 차단 및 예방으로 관내 양돈농가 안전 도모

청결한 공중화장실 관리

□ 개    요

◦ 기    간 : 2020. 1. ~ 12월

◦ 사 업 비 : 89,168천원

◦ 사업대상 : 공중화장실 130개소(공중 75, 개방 28, 간이 27)

◦ 사업내용 : 편의용품 구입·배부·비치, 시설 보수·정비, 교체 설치 등

□ 추진실적

◦ 편의용품 구입 및 배부 4회(설날, 춘향제, 휴가철, 추석)	: 110개소/40백만원

※ 제외(20개소) : 만인의총 2, 국립공원 13, 남원역, 남원휴게소, 지리산(상·하)휴게소, 천왕봉휴게소

◦ 악취제거용 방향제 및 세정제 비치(월 1회)	: 55개소/22백만원

◦ 음성인식 비상벨 설치(112상황실 연계)	: 12개소/19백만원

◦ 불법촬영방지 카메라탐지기 점검(8회)	: 110개소

◦ 공중화장실 관리카드 작성 및 시설물 점검(4회)	: 110개소

□ 금후계획

◦ 범죄, 응급상황으로부터 안전한 화장실 운영	: 연중

- 여성화장실 음성인식비상벨 추가 설치(10개소) 및 작동 수시점검

◦ 지속적인 점검으로 깨끗하고 쾌적한 공중화장실 시설관리 : 연중

- 편의용품(화장지, 봉비누) 구입 및 배부, 노후 시설물 파악 즉시 수선

◦ 화장실 편의시설 설치 여부 조사 실시	: 2020. 01. ~

- 동파방지를 위한 난방시설, 환풍시설, 세면기, 남성 소변기 가림막, 청소 안내판 등

슬레이트 처리 지원

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12월

◦ 지원대상 : 슬레이트 주택

◦ 사 업 량 : 350동(철거 290, 비주택 35, 개량 25)

◦ 사 업 비 : 1,164백만원(국비 582, 시비 582)

- 주택 철거 997백만원 / 비주택 철거 60백만원 / 지붕개량 107백만원

◦ 사업내용 : 유해물질인 슬레이트의 철거·처리 및 지붕개량 지원

□ 추진실적

◦ 슬레이트 철거 지원사업 추진	: 231동, 20,175㎡ / 410백만원

◦ 저소득층 슬레이트지붕 철거 및 개량 사업 추진	: 25동, 2,355㎡ / 175백만원

◦ 보관슬레이트 사업 추진	: 25동, 2,139㎡ / 28백만원

※ 연도별 추진현황

구 분	계	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
사 업 비 (백만원)	3,666	264	432	712	571	537	537	613
배정물량(동)	1,147	110	150	212	170	160	160	185
처리실적(동)	1,886	118	246	368	291	277	305	281

□ 금후계획

◦ 주택개량과 관련된 타 사업 연계 대상자 파악(건축과) : 2020. 01.

- 농어촌주택개량, 빈집정비, 자가가구 주거급여, 취약지역 생활여건 개조사업 등

◦ 슬레이트 철거 지원사업(325동) 추진

- 신청자 접수, 대상자 확정 및 현지조사	: 2020. 01. ~ 03.

- 해체·포장 공사 및 운반·처리 용역 추진	: 2020. 03. ~ 06.

◦ 취약계층 철거·처리 및 지붕개량 공사(25동) 추진	: 2020. 04. ~ 06.

- 기초수급자, 차상위계층, 한부모가구, 독거노인가구, 장애인 포함 가구 등

◦ 예산잔액 발생 시 실태조사를 통한 추가 사업 추진	: 2020. 07.

- 슬레이트 처리 추가 지원, 슬레이트 주택 전수조사, 보관슬레이트 처리 등

악취배출원 관리 및 저감사업 추진

□ 개    요

◦ 기    간 : 2020. 1. ~ 12월

◦ 대    상 : 악취 중점관리 사업장(25개소) 등

- 축사(돼지 17, 닭·오리 3), 재활용업체(한진, 바래봉), 사업장(남원수지, 코리아더커드, 비이테크)

◦ 사 업 비 : 289백만원(도비 78, 시비 182, 자담 29)

◦ 내    용 : 24시간 모니터링 시스템 순환 운영 및 악취 저감사업 추진 등

	< 무인 자동악취 포집기 설치완료(7개소) >
백남수 돈사(대산), 실상농장(산내), 덕실마을(인월), 서도마을(사매), 남원수지(대산), 바래봉 퇴비(운봉), 비이테크(대강)

□ 추진계획

(1단계 예방) 악취 저감사업 추진	□	(2단계 점검) 점검 강화	□	(3단계 관리) 모니터링

◦ 악취저감사업 수요조사, 대상자 선정 및 사업 추진  : 2020. 01. ~ 05.

- 바이오커튼(5식/200백만원), 플라즈마(10기/89백만원)

◦ 기상상황에 따른 악취발생사업장 관리 안내문자 발송 : 연중

◦ 악취저감기술 지원 및 악취관리 교육의뢰(한국환경공단) : 2020. 03. ~

◦ 사업장별 악취저감 자발적 관리유도 및 실적제출    : 분기별

◦ 악취민원 신속대응 하절기 집중점검반 운영(2개반 4명) : 2020. 05. ~ 09.

◦ 악취·대기배출 사업장 포집, 측정의뢰 및 관리강화 : 연중

◦ 운영소홀 악취민원 시 미생물 탈취제 지원 등 보조사업 제한(축산과 협조)

◦ 무인 자동악취 포집기 상시 모니터링 및 순환 운영(27개소) : 6개월/개소

□ 기대효과

◦ 예측 문제사업장에 대한 사전 피해확산 방지 및 대응체계 구축

◦ 악취발생원 관리로 반복민원 최소화 및 주변마을 생활불편 저감 유도