기 업 지 원 과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2020년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 산업단지 기반시설 정비

◦ 기업 경쟁력 강화 및 쾌적한 근로환경 조성

◦ 근로자 행복주택 건립

◦ 산업단지 통근버스 운행

◦ 남원사매일반산업단지 조기분양 추진

◦ 재정지원으로 투자유치기업 경쟁력 강화

◦ 남원 일반산업단지 조성사업 추진

◦ 남원 일반산업단지 국고지원 사업

일  반  현  황

□ 기    구

									기업지원과장
									마 우 천
기업지원담당										투자유치담당														산단관리담당
조 철 현										안 민 엽														서 지 호
공장창업․설립 공장등록관리 산업단지입주 산업단지관리 중소기업육성 공공구매확대										기업유치 민간투자유치 투자기업지원 투자유치홍보														농공단지조성 일반산업단지조성 용지보상및수용재결 산업단지관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	12	1	3	5	2	1
현 원	12	1	5	3 (휴직1)	1	2
증 감	-	-	2	△2	△1	1

2020년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 산업단지 기반시설 정비 : 6개사업 / 1,092백만원 ◦ 중소기업 육성 기금 지원 : 18개업체 / 5,370백만원 - 이자 이차보전 지원 : 56개업체 / 176백만원 ◦ 중소기업 환경개선(뿌리기업 포함) : 16개업체 / 353백만원 ◦ 기업 경쟁력 강화 및 근로자 복지 지원 - 박람회 참가지원 : 3개기업 / 6백만원 - 애향장려금 : 31명 / 31백만원, 전입정착금 : 54명 / 13.4백만원 ◦ 2020년 상반기 노암산업단지 3지구 분양실적 : 2블럭 / 20,054㎡ ◦ 유치기업 투자보조금 지원 및 협의 : 3개기업 / 56.5억원 ◦ 일반산업단지 조성사업(3차분) 착공 ◦ 일반산업단지 공업용수도 건설사업(4차분) 착공

□ 활기찬 강소기업 육성·지원

◦ 기업육성 지원

- 중소기업 육성기금융자 지원	: 18개업체 / 5,370백만원

- 중소기업 육성기금 이자 이차보전	: 56개업체 / 176백만원

- 중소기업 환경개선사업	: 15개업체 / 321백만원

- 국내․외 박람회 참가 지원	: 3개업체 / 6백만원

- 뿌리기업 그린환경 구축	: 1개업체 / 32백만원

◦ 근로자 지원 : 애향장려금(31명/31백만원), 전입정착금(54명/13.4백만원)

◦ 산업단지 기반시설 정비	: 6개사업 / 1,092백만원

◦ 기업 애로 해소 : 시책설명회, 소통간담회, 기업 애로 상담실 운영

◦ 중소기업제품 공공구매 확대 : 826억원 (물품:394, 공사:344, 용역:88)

□ 지역경제 활성화를 위한 기업유치 및 지원

◦ 노암산업단지 3지구 분양률 : 92%(분양완료 및 투자협약 23블럭)

◦ 남원산업단지 분양홍보 : 버스광고, 홍보 플래카드, 홍보물 발송 등

◦ 신속한 공장 안정화를 위한 투자보조금 지원

- ㈜코빅스 지방투자촉진보조금 1차분 1,2회 지원	: 30.9억원

- ㈜조은플러스 투자촉진보조금 지원	: 13.7억원

- ㈜제너럴바이오 지방투자촉진보조금 1차분 지원	: 11.9억원

□ 일반산업단지 조성사업 추진

◦ 용지보상 추진 : 317필지 중 313필지 완료(보상협의율 98.7%)

- 사매면 월평리 322-9외 3필지 지방토지수용위원회 재결신청 : ‘20. 04. 24.

◦ 일반산업단지 조성사업 추진 : 777천㎡ 30억원 / 현재 공정률 93%

◦ 공업용수도 건설사업 추진 : 상수도관로 L=16.0㎞ 43억원 / 현재 공정률 80%

◦ 공공폐수처리시설 설치사업 추진 : Q=2,000㎥/일(1단계 400㎥/일) 29억원

◦ 공공폐수처리시설 설치사업(1단계) 기본 및 실시설계 보완내용 완료(최종심사중)                                                                        : ‘20. 05. 13.

- 공공폐수처리시설 설치사업 실시설계 협의요청       : ‘20. 02. 23.

- 공공폐수처리시설 설치사업 기본계획(변경) 계획(안) 검토요청 : ‘20. 03. 16.

- 공공폐수처리시설(1단계) 실시설계 보완 통보(환경청→시) : ‘20. 04. 01.

	하반기 추진방향
◦ 농공단지 시설 정비 - 노후농공단지 기반시설 정비로 근로여건 개선 - 기업하기 좋은 산업단지 복지시설 확충 ◦ 기업 경쟁력 강화 - 기업 경쟁력 확보를 위한 다양한 시책 지원 - 기업 간 경쟁력 강화를 위한 협업체계 구축 ◦ 근로복지 환경 조성 - 생산성 향상을 위한 쾌적한 근로환경 조성 - 맞춤형 기업애로 해소 및 현장소통 강화 ◦ 유망기업 유치 및 유치기업 경쟁력 확보를 위한 재정지원 - 투자환경설명회 개최 등 전략적인 기업유치 추진 - 사매산업단지 분양홍보 강화로 우량기업 유치 - 유치기업 재정지원으로 신속한 공장안정화 기여 ◦ 산업단지 기반 구축 - 산업단지조성으로 산업 핵심성장 거점 확보 - 국고 지원사업 국비 예산확보 주력

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

산업단지 기반시설 정비

□ 개    요

◦ 사 업 명 : 노후 산업단지 기반시설 확충 및 시설 개선사업

◦ 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월

◦ 사 업 비 : 6개사업 / 1,092백만원 (도224, 시868)

◦ 사업내용 : 산업단지 기반시설 보강 및 환경영향평가 등

□ 추진실적

단지명	사 업 명	사 업 내 용	사 업 비 (백만원)
계	6개 사업		1,092
광치	광치 제1,2단지 노후상수관로 정비공사	배수관로 2.5㎞ 정비	491
광치2	광치 2단지 체육시설 정비공사	탄성포장 A=60㎡, 체육시설 정비 1식	20
노암1·2	노암1,2단지 도로 차선 도색공사	노암1,2단지 차선도색 A=1,842㎡	60
노암3	노암산업단지 3지구 사후환경영향조사	A=325,396.4㎡,사후환경영향조사 1식	120
	단지 내 도로 아스콘 포장공사	흙깎기168㎡, 흙쌓기149㎡, 사토43㎡ 배수공(L=119m), 포장공 A=1,139㎡	50
보절	보절석재단지 상수도공급	배수관로 1.8km 신설	351

□ 금후계획

◦ 시설공사 업무 추진	: 2020. 5.

◦ 2021년 시설보수대상 현황 파악	: 2020. 8.

◦ 2021년 농공단지 정비사업 계획 수립	: 2020. 9.

기업 경쟁력 강화 및 쾌적한 근로환경 조성

□ 개    요

◦ 경영난 해소를 위한 중소기업 육성기금 융자지원

◦ 관내기업 청·장년층 근로자의 사기 진작을 위한 애향장려금 지급

◦ 근로자의 안정적인 가족 정착을 위한 전입정착금 지급

◦ 쾌적한 근로환경 조성을 위한 중소기업 환경개선사업

◦ 기업 애로 해소를 위한 시책설명회 및 소통 간담회 추진

□ 추진실적

◦ 중소기업육성기금 융자 지원	: 18개 기업 / 5,370백만원

◦ 중소기업 육성기금 이자 이차보전	: 56개업체 / 176백만원

◦ 애향장려금지원 : 31명 / 31백만원,   전입정착금 지원 : 54명 / 13.4백만원

◦ 박람회 참가 지원	: 3개 기업 / 6백만원

◦ 중소기업 환경 개선사업(뿌리기업 포함)	: 16개 기업 / 353백만원

◦ 기업 애로 해소 및 지원시책 설명회(100개 기업 참여)  : 2020. 1. 31.

□ 금후계획

◦ 중소기업육성기금 융자지원	: 연중

◦ 애향장려금 지급 (10명 / 10백만원)	: 2020. 9월중

◦ 근로자 전입정착금 (75명 / 34백만원)	: 2020. 5~12월

◦ 박람회 참가 지원 (7개기업 / 14백만원)	: 연중

◦ 뿌리기업 그린환경 시스템 구축(1개 업체 / 32백만원)	: 2020. 6~12월

◦ 근로자 역량강화교육(4회 / 800명)	: 2020. 8~9월

◦ 기업 애로 해소 상담제 지속 운영	: 연중

근로자 행복주택 건립

□ 개    요

◦ 위    치 : 노암산업단지 3지구 지원시설용지 내 / 3,752㎡(1,137평)

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2022년(3년)

◦ 사 업 량 : 120세대 / 4층(21㎡, 33㎡, 36㎡, 44㎡)

◦ 예 산 액 : 170억(국비(30%), 주택기금융자(40%), LH(20%), 남원시(10%)

◦ 사업추진 : LH전북본부와 협력하여 국토교통부『행복주택사업』공모

◦ 노암산업단지 입주 기업 근로자 현황

합 계		1단지		2단지		3단지
기업체수	근로자	기업체	근로자	기업체	근로자	기업체	근로자
41	748명	15	320	12	331	14	97

□ 추진실적

◦ 근로자 행복주택 사업 공모신청(남원시+LH)	: 2019. 8.

◦ 근로자 행복주택 공모사업 선정(국토교통부)	: 2019. 10. 23.

◦ 사업부지 지구단위 계획 변경 완료(높이 및 용적율 변경)	: 2019. 12. 20.

□ 쟁점 및 대책

◦ 사업 선정에 따른 신속한 공사 착공이 이루어 져야 하나, 실제 착공까지는 설계완료 및 국토부 사업계획 승인절차 이행으로 다소 늦어지고 있음.

- LH 전북지역본부와 유기적인 협조를 통하여 설계 및 인허가 기간 단축과 국토부 사업계획 승인 등이 신속히 이루어 질 수 있도록 최대한 노력.

□ 금후계획

◦ LH – 남원시 행복주택 건립추진을 위한 MOU 체결	: 2020. 6. 2.

◦ 행복 주택 건립 부지 매매계약 체결	: 2020. 7월

◦ 주택건설 사업계획 최종승인(국토부)	: 2020. 8월

◦ 행복주택 착공	: 2020. 9월

산업단지 통근버스 운행

□ 개    요

◦ 운행대상 : 5개 단지(광치 및 노암산업단지) / 83개 기업, 1059명 근로자

◦ 사업기간 : 2020. 5 ~ 2022. 12. (3년간)

◦ 사 업 비 : 4억원(국비 3.6, 시비 0.4) / 연 1억 3천만원

◦ 운행대수 : 5대(주말 1대 운행 포함) / 1일 164명 이용 수요조사

◦ 운행노선 : 5개노선 / 평일 출·퇴근 운행횟수 : 노암 5회, 광치 1회

< 운행노선 및 시간(출·퇴근 왕복) >

구분	출발	도착	주요 노선 및 경유지	통근유형	승차
1노선 (8시출근)	07:00	07:25	이그린@승강장→도통→죽항→노암산업단지	주간 출·퇴근	43명
	18:00	18:22	이그린@승강장→ 도통 → 노암산업단지	야간 출·퇴근
2노선 (8시출근)	06:55	07:26	시청앞→향교→왕정→금동→ 노암산업단지	주간 출·퇴근	43명
	17:55	18:24	시청앞→향교→죽항→금동→ 노암산업단지	야간 출·퇴근
3노선 (9시출근)	07:50	08:17	풍산누리안승강장→도통→향교→왕정→금동→노암단지	주간 출근	35명
	18:10	18:35	노암단지→금동→왕정→향교→도통→풍산누리안승강장	주간 퇴근
4노선 (9시출근)	07:10	07:29	금동오향족발→왕정→죽항→도통→광치산업단지	주간 출근	11명
	17:20	17:37	광치산업단지→도통→죽항→왕정→금동오향족발	주간 퇴근
5노선 (8시출근)	07:00	07:26	이그린@승강장→도통→향교→죽항→노암산업단지	주말 출·퇴근	29명
	19:20	19:45	노암산업단지→죽항→향교→도통→이그린@승강장	주말 출·퇴근

□ 추진실적

◦ 고용노동부 정부합동 공모사업 선정	: 2020. 3. 6.

◦ 기업별 통근버스 이용 승차인원 수요조사 실시(150명 이용)	: 2020. 3. 9. ∼ 3. 16.

◦ 전주지방 노동청 사업 추진 실무협의 완료(지역협력과)	: 2020. 3. 18.	◦ 통근버스 운행시간 및 노선 수요조사 및 확정	: 2020. 4. 6. ∼  4. 17.

□ 금후계획

◦ 산업단지 통근버스 운행 계획 기업체 홍보	: 2020. 5월 ∼

◦ 산업단지 통근버스 운행	: 2020. 5월 ∼

남원사매일반산업단지 조기분양 추진

□ 개    요

◦ 면    적 : 45블럭 587,993㎡(분양 40블럭 / 496,206㎡, 임대 5블럭 / 91,787㎡)

◦ 공급가격 : 98,530원/㎡ (325,000원/3.3㎡)

※ 임  대 : 보증금 분양가의 10%, 연간 임대료 분양가의 1.5%, 기간 5년

◦ 분양업종 : 음·식료품, 금속가공, 전자·전기 장비, 자동차 부품 등 제조업

□ 추진실적

◦ 일반산업단지 분양 홍보 시행

- 2020년 홍보추진 종합계획 수립	: 2020. 2월

- 일반산업단지 내 유치업종 기업 대상 홍보물 발송	: 5회 / 2,500부

- 경인지역 공단(남동, 시화, 반월) 플래카드 게첨	: 3~6월(월45개)

- 경인지역 공단(남동, 시화, 반월) 순환버스 광고 시행	: 4~5월(10대)

◦ 투자유치 활동 및 MOU 추진

- 투자검토기업 방문에 따른 대표자 면담	: 20회

- ㈜LFF(전남 화순) : 투자액 100억원, 고용 40명 / 유기농업자재(복합비료 등)

- ㈜대승엠엔에스(익산) : 투자액 70억원, 고용 20명 / 모듈러교실(임시교사)

□ 쟁점 및 대책

◦ 코로나19로 인해 대면접촉 어려움으로 당초 계획한 경인지역 기업인 대상 투자환경설명회 개최 보류 및 기업 방문을 통한 직접 홍보 어려움

◦ 코로나19로 인한 경기침체로 기업 투자 소극적(기존공장 경영 정상화 집중 투자)

⇒ 코로나19로 인한 경기침체가 장기화될 전망이나, 하반기부터 기업 대면접촉 및 공격적인 투자활동 전개로 기업유치 적극추진

□ 금후계획

◦ ㈜대승엠엔에스, ㈜LFF 등 투자협약 체결	: 2020. 6월 내

◦ 재경향우회 및 관계기업 활용 남원산업단지 기업유치활동 전개

◦ 남원사매산업단지 집중 홍보

- 유치업종 기업 대상 홍보물 발송, 방송매체 활용 홍보, 입주의향기업 방문 등

재정지원으로 투자유치기업 경쟁력 강화

□ 개    요

◦ 지방투자촉진보조금(국비·도비·시비 매칭지원)

- 관련규정 : 산업통상자원부 국가재정 지원고시

- 대상기업 : 수도권이전기업, 신·증설기업, U턴기업

◦ 투자보조금(순 시비지원)

- 관련규정 : 남원시 기업 및 투자유치 촉진조례 및 시행규칙

- 대상기업 : 국내기업, 대규모투자기업

□ 추진실적

◦ ㈜코빅스 지방투자촉진보조금(국·도비) 지원확정           : 2019. 12월

- 지원 결정금액	: 48.4억원(국비 38.7, 도비6.8, 시비2.9)

- 1차분 1회 지급(2020. 2월)  : 21.3억원(국비 17, 도비3, 시비1.3)

- 1차분 2회 지급(2020. 4월)  :  9.6억원(국비 7.7, 도비1.3, 시비0.6)

◦ ㈜조은플러스 투자촉진보조금(시비지원) 지원확정 및 지급   : 2020. 4월

- 지원 결정금액	: 13.7억원

◦ 제너럴바이오(주) 지방투자촉진보조금 확보(국·도비) 지원확정  : 2020. 2월

- 지원 결정금액	: 17억원(국비 13.6, 도비2.4, 시비1)

- 1차분 지급(2020. 5월)      : 11.9억원(국비 9.5, 도비1.7, 시비0.7)

□ 금후계획

◦ (주)대명창호 투자사업 정산 및 지투보조금 2차분 지급	: 2020년 하반기

- 2차분 지원	: 5.7억원(국비4.6, 도비0.8, 시비0.3)

◦ (주)코빅스 투자이행 상황에 따른 1차분 잔여금액 지급	: 2020. 7월

- 1차분 잔여 보조금액 : 1.7억원(국비1.3 도비0.3 시비0.1)

◦ 2020년 유치기업 지방투자촉진보조금 신청 및 확보	: 2020년 하반기

◦ 제너럴바이오(주) 투자사업 정산 및 지투보조금 2차분 지급	: 2021년 상반기

- 2차분 지원 : 5.1억원(국비4.1 도비0.7 시비0.3)

남원 일반산업단지 조성사업 추진

□ 개    요

◦ 위치/면적 : 사매면 월평리 산37-3번지 일원

- 토지이용계획 : 777천㎡(산업시설 588, 지원시설 6, 공공시설 183)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2020년(4개년)

◦ 주요유치업종 : 금속, 음료식품, 전자, 전기장비, 자동차부품 등

◦ 총사업비 : 649억원(특별교부세 10, 시비 639 )

◦ 연도별 투자계획                                       (단위: 억원)

구 분	총 계	기투자	2017	2018	2019	2020이후	비고
총 계	649	222	100	172	42	113
공 사	361		90	166	41	64	폐수처리부담 (57억원)포함
보 상	190	185	1	4	-	-
용 역	45	32	4	1	1	7
기 타	53	5	5	1	-	42

□ 추진실적

◦ 일반산업단지 조성 사업(1차분) 준공	: ‘18. 05. 25.

◦ 일반산업단지 조성 사업(2차분) 준공                     : ‘19. 12. 23.

◦ 일반산업단지 조성 사업(3차분) 착공 [공정율 93%]        : ‘20. 03. 02.

□ 쟁점 및 대책

◦ 손율마을 앞 녹지공간 수목(소나무) 이식에 따른 민원발생

□ 산업단지 주변마을(손율, 수월, 덕평) 주민들과 대화를 통한 민원해소

추진 중에 있으며, 수목(소나무) 82주 중 41주 타 녹지구간 재이식 계획

□ 금후계획

◦ 남원 일반산업단지 준공 예정	: ‘20. 06. 29.

◦ 지적확정측량 용역 완료에 따른 산업단지계획 변경추진  : ‘20. 07. ~

◦ 산업단지 개발사업 준공인가 추진                      : ‘20. 08. ~

남원 일반산업단지 국고지원사업

[진입도로, 공업용수도, 공공폐수처리시설]

□ 개    요

◦ 사업별 상세조서                                       (단위 : 억원)

구 분	총 계	진입도로	공업용수도	공공폐수처리시설
총사업비	415	146	94	175
사 업 량	-	L=2.1㎞(B=19~22m) 북측 0.9㎞, 남측 1.2㎞	관로 L=16.0㎞(D350㎜) 배수지(2,000㎥) 1식	Q=2,000㎥/일 (1단계 400)
사업기간	-	2016~2019년	2017~2020년	2019~2021년(1단계)
진행과정	-	준공(공정률 100%)	공사 중(공정률 80%)	기본 및 실시설계 추진

◦ 연도별 투자계획                                        (단위 : 억원)

구 분	총계	기투자	‘19	‘20	‘21이후	비 고
총 계	415	175	29	72	139
진입도로(국비)	146	146	-	-	-
공업용수도(국비)	94	22	29	43	-
공공폐처리시설(국비)	175	7	-	29	139

□ 추진실적

◦ 일반산업단지 진입도로 개설사업 준공                : ‘19. 09. 03.

◦ 공공폐수 처리시설 사업발주를 위한 협의요청(전북지방환경청) : ‘20. 02. 24.

◦ 공업용수도 건설사업(4차분) 착공(현 공정률 80%)      : ‘20. 03. 02.

◦ 공공폐수 처리시설(1단계) 기본 및 실시설계 보완내용 완료(최종심사중) : ‘20. 03. 02.

□ 쟁점 및 대책

◦ 공공폐수 처리시설 예정지 인근 우리유황오리 영농조합법인에서 폐수처리장

운영시 악취 우려에 따른 폐수 전용관로 설치요구

□ 폐수처리장 운영으로 악취 발생시 전북지방환경청과 협의하여 하상

굴착 관로매설 추진(L=550m, 5억원)

□ 금후계획

◦ 공공폐수 처리시설(1단계-400톤/일) 사업발주 및 착공(‘21.7.준공추진) : ‘20. 06.

◦ 공업용수도 건설사업 준공	: ‘20. 10.