2020. 6.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

상 수 도 사 업 소

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2020년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 상 수 도 공 기 업 의  안 정 적  재 정 확 충

◦ 마 을 상 수 도 정 비 사 업

◦ 광 역 상 수 도  마 을 권 사 업

◦ 농 어 촌 생 활 용 수 개 발 사 업

◦ 노 후 상 수 관 교 체 공 사

◦ 누 수 다 발 지 역  상 수 관 교 체 공 사

◦ 월 락 정 수 장  현 대 화 전 면 개 량 사 업

일  반  현  황

□ 기    구

									상수도사업소장
									강 병 훈
수도경영담당					급 수 담 당							수도시설담당									누수방지담당
임 성 민					이 현 석							안 용 운									김 오 진
∘상수도 공기업 경영 ∘특별회계 재정운영 ∘상수도 사용료 검침 및 요금부과 징수					∘광역상수도 마을권 급수 공사 ∘마을상수도 시설 관리 ∘개인 급수공사							∘월락정수장 개량 ∘광역상수도 수수사업 ∘정수장 및 배수지운영관리 ∘상수원 보호구역 관리									∘상수도 관망 유지 관리 ∘노후 급·배수관 교체 ∘노후 계량기 시설 개량 ∘누수관로 복구

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	23	1	5	6	4	7
현 원	23	1	9	4	6	3	11 (청경2,공무9)
증 감	-	-	4	△2	2	△4

□ 2020년 예산규모  : 35,827백만원

				＜2020 예산 >			(단위 : 백만원)
	구 분		2020년		2019년			증 감(%)
	합 계		35,827		28,675			7,152(24.9%)
	일반회계		9,701		9,194			507(5.5%)
	특별회계		26,126		19,481			6,645(34.1%)

▷ 2020년 특별회계 : 26,126백만원

					＜세 입＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2020년		2019년			증 감(%)
	합 계			26,126		19,481			6,645(34.1%)
	자체수입			8,701		8,311			390(4.7%)
	의존수입		국 비	8,625		3,370			5,255(155.9%)
			지원금	8,800		7,800			1,000(12.8%)

					＜ 세 출 ＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2020년		2019년			증 감(%)
	합 계			26,126		19,481			6,645(34.1%)
	사업비		소계	21,048		14,392			6,656(46.2%)
			투자사업	19,329		13,013			6,316(48.5%)
			경상사업	1,719		1,379			340(24.7%)
	비사업		소계	5,078		5,089			△11(0.2%)
			행정운영	4,546		4,297			249(5.8%)
			예 비 비	532		792			△260(32.8%)

※ 행정운영 : 인건비 + 기본경비 + 광역정수비

□ 급수현황

(’19. 12. 31. 기준)

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급률 (%)	1인1일 급수량(ℓ)	평균생산량 (㎥/일)	유수율 (%)
81,441	75,692	92.88	338	25,561	76.8

□ 수도시설 현황

◦ 생 산 시 설 : 39,800㎥/일(월락정수장 15,000/광역상수도 24,800)

◦ 상수도 관로 : 1,051㎞(도수․송수․배수관 560, 급수관 491)

◦ 배  수  지 : 9개소(27,250㎥)

◦ 가  압  장 : 35개소(무인자동제어 34개소)

◦ 감  압  변 : 32개소

◦ 검침급수전 : 28,189전

□ 상수원 보호구역 현황

◦ 위    치 : 월락․도통․신촌․고죽동, 이백면

◦ 지정면적 : 414,525㎡

◦ 지 정 일 : 1985. 12. 24.(0.418㎢) → 2008. 12. 12.(0.414㎢)

□ 마을상수도 현황

시설수 (개소)	규 모 별		급수인구	비 고
	마을상수도	소규모급수시설
75	46	29	3,051세대 5,839명	□마을상수도 - 20㎥/일 이상 500㎥/일 미만 □소규모급수시설: 20㎥/일 미만

□ 상수도 관로                                 (단위:km)

구분	총연장	재 질 별				매설연한별			비고
		금속	PE.PVC	내충격수도관	기타	20년미만	20~29년	30년이상
계	1,051	243	195	591	22	933	44	74
도수관	1	-	-	-	1	1	-	-
송수관	15	10	2	3	-	12	2	1
배수관	544	226	2	297	19	516	13	16
급수관	491	7	191	291	2	404	29	57

2020년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 농촌지역의 안정적인 물 공급을 위한 급수체계 구축 ◦ 안정적 물 공급을 위한 광역상수도 마을권 사업 추진 ◦ 공기업운영 효율화를 통한 건전재정 기반 구축 ◦ 맑은물 공급을 위한 노후상수관 교체사업 추진 ◦ 월락정수장 현대화 전면 개량사업 추진

□ 농촌지역의 안정적인 물 공급을 위한 급수체계 구축

◦ 사매지구 농어촌생활용수 개발사업 (노봉마을 L=3.0㎞) ⇒ 완료

◦ 대상지구 가압장 설치공사 (가압장 2개소) ⇒ 추진 중 (6월 중 완료)

◦ 주천 내·외용궁 상수도공사 L=3.4㎞ ⇒ 하수관 병행사업 추진(10월 중 완료)

◦ 주천 배촌·덕촌·안곡 상수도공사 L=4.0㎞ ⇒ 하수관 병행사업 추진(10월 중 발주)

◦ 운봉지구 상수도공사 (내기, 고촌, 회덕, 노치, 주촌 L=14.3㎞) ⇒ 추진 중 (공정률 30%)

◦ 고평지구 농어촌생활용수 개발사업(양촌,고정,진곡,마륜 L=8㎞) ⇒ 추진 중 (공정률 5%)

◦ 아영지구 농어촌생활용수 개발사업(오산,상성,하성,구상 L=10㎞) ⇒ 추진 중 (공정률 5%)

□ 안정적 물 공급을 위한 광역상수도 마을권 사업 추진

◦ 맑은 물 공급을 희망하는 농촌 마을에 상수관 매설 및 계량기 설치공사를

통한 광역상수도 추진 (급·배수관 1.5㎞ / 6개 마을 계량기 288개소)

- 광역상수도 마을권 급수공사 (고죽동 고산마을, 1.5km) ⇒ 완료

- 마을권 계량기 설치공사 (6개 마을, 288개소)

⇒ 1개 마을 상반기 완료(사매 노봉, 53가구)

□ 공기업운영 효율화를 통한 건전재정 기반 구축

◦ 과년도 체납금 징수활동 강화를 통한 자주재원 확충 : 153백만원 (징수율 99%)

◦ 급수지역 확대로 세입확충 도모 : 141백만원(247전)

□ 맑은 물 공급을 위한 노후상수관 교체사업 추진

◦ 노후상수관 교체공사 추진(6개소, 노후관로 6.5km) ⇒ 공정율(40%)

- 남원관광지 노후상수관 교체공사(L=0.7km)

- 남원대교 승사교간 노후상수관 교체공사(L=1.8km)

- 월락 락현마을 노후상수관 교체공사(L=0.9km)

- 오거리 동림교간 노후상수관 교체공사(L=0.7km)

- 하정동 노후상수관 교체공사(L=0.3km)

- 노암동 노후상수관 교체공사(L=2.1km)

◦ 누수다발지역 상수관 정비공사 추진(1개소, 상수관로 1.9km) ⇒ 공정율(40%)

- 소리길 누수다발지역 상수관 정비공사(L=1.9km)

◦ 하우징 설치공사 및 소화전 설치공사 추진 ⇒ 공정율(80%)

- 금지 입암,  덕과 금덕 하우징 설치, 소화전 38개소 설치

◦ 누수지역 155개소 긴급복구, 노후 수도미터 교체 2,940전

□ 월락정수장 현대화 전면 개량사업 추진

◦ 월락정수장 개량사업 1차분 착공(현공정 52%/전체분 6%)	: `19. 12. ~

- 토목·건축·기계·조경, 전기 및 계측제어, 소방, 정보통신

◦ 기존 수배전반 이설 및 임시 수배전반 설치	: `20. 2. ~ 3.

◦ 관리동 기초, 1층 벽체·슬라브 콘크리트 타설	: `20. 3. ~ 4.

◦ 여과지 가시설, 기초 콘크리트 타설, 벽체시공	: `20. 3. ~ 4.

	하반기 추진방향
◦ 농촌지역 상수도 공급확대로 안정적인 생활용수공급 계속추진(21개 마을) ◦ 안정적인 광역상수도 공급 하반기 지속 추진 ◦ 상수도체납요금 징수활동 강화를 통한 자주재원 확층 ◦ 노후관 교체 사업 조속 완료로 맑은 물 공급 확대 ◦ 월락정수장 개량사업 관리동, 여과지 준공(9월) 및 정수지 시공

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

상수도공기업의 안정적 재정 확충

□ 개    요

◦ (추진목표)  상수도 급수구역 확대와 요금 체납자에 대한 징수로 세입       목표 달성하여 건전 재정운영 도모

◦ 연도별 세입 증감 내역	(단위:백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	전년대비
세 입	15,098	14,439	15,142	19,481	26,126	증 34.1%

☞ 2019년 대비 주요증감 요인(66억원 증)

- 월락정수장 개량사업비 확보   : 97억원(‘19년 24억원 대비 73억원 증)

- 공기업특별회계자본금전출     : 88억원(‘19년 78억원 대비 10억원 증)

- 상수도시설물 정밀점검 용역 외 : 1.7억원(‘19년 0.7억원 대비    1억원 증)

- 배수관로포설사업            : 2.5억원(‘19년 15억원 대비 12.5억원 감)

- 노후상수관 교체사업         : 33억원(‘19년 38억원 대비  5억원 감)

- 노후 급수장치 교체          :  3억원(‘19년 3.5억원 대비 0.5억원 감)

□ 추진실적

◦ 과년도 사용료 체납금 징수활동 강화로 자주재원 확보 : 153백만원

- 체납특별징수 기간 운영(매분기) : 단수조치 48건, 재산압류 16건

◦ 수도요금 징수내역

(단위 : 천원)

연 도	부 과 액	징 수 액	체 납 액	징 수 율
2018년	6,437,943	6,413,456	24,487	99.6%
2019년	6,426,330	6,369,727	56,603	99.1%
2020년4월	1,983,561	1,892,133	91,428	95.4%

◦ 상수도 급수구역 확대로 인한 사용료 수입 확충(247전) : 141백만원

※ 공기업평가 : ‘19년도 “나등급” 으로 전북1위 선정(3년 연속)

□ 금후계획

◦ 체납요금 특별 징수기간 지속운영(매분기별)

- 고질 고액체납자 분류 관리, 담당구역별 책임 관리⇒행정처분(단수,재산압류 등)

◦ 예산절감 시책발굴을 통한 경영효율화 노력

마을상수도 정비사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 관내 75개소(마을상수도 46, 소규모급수시설 29)

※ `19년도 기준 82개소, `20년 상반기 감 7개소(광역상수도 전환)

◦ 사 업 량 : 신설 2개 지구 L=2.2㎞(산내 원백일, 달궁 버드재)

정비 1개 지구 L=0.2㎞(산내 내령), 물탱크 30톤(산내 외령)

상수관 포장 복구 1개 지구 L=0.9㎞(인월 상우)

누수 긴급복구 및 유지보수(연중 수시)

◦ 사 업 비 : 771백만원 (정비 571, 긴급복구 200)

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12월(연중)

□ 추진실적

◦ 2020년 마을상수도 신설 및 정비공사 시행(5개소)       :‘20. 3. ~ 6월

- 신설 : 산내 원백일(공정률 60%), 산내 달궁 버드재 (공정률 20%)

- 정비 : 산내 내령·외령, 인월 상우(공정률 100% 공사 완공)

‘

□ 금후계획

◦ 산내 원백일마을 마을상수도 이용시설공사 완료     :‘20. 6월

◦ 산내 달궁(버드재) 마을상수도 이용시설공사 완료    :‘20. 8월

◦ 수질점검 강화 및 유지보수 추진(수시)              : 년중

광역상수도 마을권 사업

□ 개    요

◦ 총괄사업

(단위: 마을, 백만원)

구 분	전 체		기투자		2020년		이후계획
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	353	20,160	307	18,312	6	708	40	1,140
마을권 급수	347 (급수구역)	20,160	307	18,312	2	236	40	1,140
	6 (급수구역외)				4	472

※ `18년 347마을 ⇒ `19년 349마을(급수구역외 2개소 : 보절 다산·호복동)

※ `19년 349마을 ⇒ `20년 353마을(급수구역외 4개소 : 고산, 호치, 보절 금계, 산동 상신)

◦ 2020년 사업

- 위    치 : 고죽동 고산마을 등 6개 마을(고산, 호치, 노봉, 금계, 대상, 상신)

- 사 업 량 : 급·배수관 1지구(고죽동 고산) L=1.5㎞, 계량기설치 288가구

- 사 업 비 : 708백만원(시비)

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 11월

□ 추진실적

◦ 마을권 계량기 설치공사 주민설명회 개최         :‘20. 1. ~ 4월

◦ 광역상수도 마을권 급수공사 완료(1지구, 1.5㎞)   :‘20. 5월

- 고죽동 고산마을(가압장 완공 이후 계량기 급수 개시)

◦ 마을권 계량기 설치공사 추진(사매 노봉/53가구)   :‘20. 4. ~ 6월

□ 금후계획

◦ 향교동 호치마을 배수관 매설공사 추진	: `20. 9월 이후

- 광역상수도 공급을 위해 배수관 200m 추가 매설 필요

◦ 마을권 계량기 설치공사 추진(5개 마을/235가구)    :‘20. 3. ~ 11월

◦ 2021년도 마을권 계량기 설치공사 대상지 선정      :‘20. 9. ~ 12월

농어촌생활용수 개발사업

□ 개    요

구분	사 업 명	사 업 량	총사업비(백만원)				사업기간	비 고 (공정)
			계	국비	도비	시비
	계	7개지구 22개마을	10,460	3,791	3,530	3,139	2015~2021
생활용수	사매지구 농어촌생활용수 개발사업	상수관L=3.0km 1개마을	1,220	642	212	366	2015~2020	완료
	대상지구 농어촌생활용수 개발사업	가압장 2개소 3개 마을	2,500	816	934	750	2018~2020	80%
방사성 2차	주천 내·외용궁	상수관 L=3.4km 2개마을	465	325	-	140	2019~2020	5% (하수도 병행)
	주천 배촌·덕촌·안곡	상수관L=4.0km 3개마을	1,980	1,386	-	594	2019~2021	5% (하수도 병행)
방사성 3차	운봉지구 내기·고촌·회덕 노치·주촌	상수관 L=14.3km 5개마을	1,895	622	704	569	2019~2021	30%
생활용수	고평지구 농어촌 생활용수개발사업	상수관 L=8.0km 4개마을	800	-	560	240	2020~2021	5% (신규사업)
	아영지구 농어촌 생활용수개발사업	상수관L=10.0km 4개마을	1,600	-	1,120	480	2020~2021	5% (신규사업)

※ `20년부터 농어촌생활용수 개발사업 균특 지방이양에 따라 국비에서 도비 전환

□ 재원투자 현황                              (단위:백만원)

구 분	계	기투자	2019	2020	2020이후	비 고
계	10,460	2,631	2,705	3,813	1,311
국 비	3,791	1,881	1,910	-	-
도 비	3,530	-	-	2,669	861
시 비	3,139	750	795	1,144	450

□ 추진실적 및 계획

◆ 농촌지역 상수도공급(22개 마을) : 완료 1개 마을,  추진중 21개 마을

◦ 사매지구 농어촌생활용수 개발사업 (1개 마을) : 완료

- 완  료 : 노봉마을

◦ 대상지구 농어촌생활용수 개발사업(3개 마을) : 추진중 (‘20년 6월 한)

- 추진중 : 2020년 전체사업 완료 계획 – 대상, 상신, 요동

◦ 주천 내·외용궁 상수도공사(2개 마을) : 추진중 (‘20년 10월 한)

- 추진중 : 환경사업소 하수관 병행사업 추진으로 10월 한 사업 완료

◦ 주천 배촌·덕촌·안곡 상수도공사(3개 마을) : 추진 중 (`21년 한)

- 추진중 : 환경사업소 하수관 병행사업 추진으로 10월 공사 발주

`21년까지 사업 완료 계획

◦ 운봉지구 상수도공사 (5개마을) : 추진 중 (`20년 한)

- 추진중 : 2020년 전체사업 완료 계획 – 내기, 고촌, 회덕, 노치, 주촌

◦ 수지 고평지구 농어촌생활용수 개발사업 (신규사업-4개마을)

- 추진중 : 양촌, 고정, 진곡, 마륜 – 금년도 1차분 준공

- 이  후 : 2021년까지 전체사업 완료 계획

◦ 아영 오산지구 농어촌생활용수 개발사업 (신규사업-4개마을)

- 추진중 : 아영 오산, 상성, 하성, 구상 – 금년도 1차분 준공

- 이  후 : 2021년까지 전체사업 완료 계획

노후상수관 교체공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동지역 급수지역

◦ 사업기간 : 2013년 ∼ 2022년(10년)

◦ 사업규모 : 노후 상수관 교체 135km

◦ 총사업비 : 22,000백만원(시비)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2020년	2020이후	비 고
22,000	17,196	2,400	2,404

□ 추진실적

◦‘19년까지 노후 상수관 교체 : L=102.4km ⇒ 75.8%

(동지역 64.9km, 타공사 병행 24.5km, 타부서 시행 13km)

◦‘20년 노후관 교체공사 6개소 6.5km

- 남원관광지(0.7km),남원대교~승사교(1.8km), 락현마을(0.9km),              오거리~동림교(0.7km), 하정동(0.3km), 노암동(2.1km)

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 여름철 높은 기온과 일시적인 유속변화로 주철관 마감재인 역청도료       및 산화에 의한 스케일등이 씻기고 이탈되면서 녹물 및 이물질 발생

(녹물 및 이물질 민원처리 : 2018년 47건, 2019년 35건)

□ 주기적인 노후관 교체 및 관말지역, 민원 많은 지역 하우징 설치

※ 하우징 2개소 설치 완료(덕과금덕, 금지입암), 1개소 추진 중(금지하도)

□ 금후계획

◦ 맑은물 공급 확대를 위한 공사 지속 추진	: ‘20.10월

◦ 하우징 시설에 대한 모니터링 및 효과분석 실시 후 공급확대

누수다발지역 상수관 교체공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수지역 (읍면동)

◦ 사업기간 : 2014년 ∼ 2021년(8년)

◦ 사업규모 : 누수발생 노후관(PVC, PE관 등) 교체 / L=56km

◦ 총사업비 : 8,230백만원(시비)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2020년	2020이후	비 고
8,230	6,430	500	1,300

□ 추진실적

◦ ‘19년까지 관로 교체 : L=41.8km (74.6%)

- 읍·면지역 29.1km(이백면 외 8개소), 동지역 12.7km(왕정동 외 3개소)

◦ ‘20년 누수다발지역 상수관 교체 1개소

※ 당 초 : 주생 상동(1.2km), 신정동 (1.4km)

- 소리길 1.9km(동림교~승월폭포) : 수영장 수돗물 공급 시급성으로 우선 시행

□ 금후계획

◦ 소리길 완공                                         : ‘20. 6월

◦ 주생상동 국도구간 도로굴착 심의                     : ‘20. 7월

◦ 주생상동 공사 추진                                  : ‘20. 10월

◦ 신정동(하수도 병행 시행)                             : ‘21년

월락정수장 현대화 전면개량사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도통동 555번지 지내

◦ 사업내용 : 정수장 시설 전면개량 Q=15,000톤/일

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4개년)

◦ 총사업비 : 325억원(국비 162.5, 도비32.5 시비 130)

(단위:백만원)

구 분	계	19년까지	2020년	2021년	2022년	비 고
합계	32,500	3,483	9,738	9,750	9,529
국비	16,250	1,217	4,869	4,875	5,289
도비	3,250	243	974	975	1,058
시비	13,000	2,023	3,895	3,900	3,182

□ 추진실적

◦ 월락정수장 개량사업 1차분 착공(현공정 52%/전체분 6%)	: `19. 12. ~

- 토목·건축·기계·조경, 전기 및 계측제어, 소방, 정보통신

◦ 기존 수배전반 이설 및 임시 수배전반 설치	: `20. 2. ~ 3.

◦ 관리동 기초, 1층 벽체, 슬라브 콘크리트 타설	: `20. 3. ~ 4.

◦ 여과지 가시설, 기초 콘크리트 타설, 벽체시공	: `20. 3. ~ 4.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 공사 추진 기간동안 단수로 인한 주민불편사항 발생 우려

□ 정수장 내 기존·가설· 신설관로 철거 및 연결 마다 한국수자원공사,         한국농어촌공사와 지속 협의 체계 유지하여 시민불편 최소화 대응

□ 금후계획

◦ 관리동 입주, 여과지 준공	: `20. 9월 중

◦ 현 관리동 철거 및 정수지 착공	: `20. 10월 ~

◦ 전체공사 준공