2020. 6.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

5분발언 추진상황

건    설    과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2020년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 도로 설해 관리 대책

◦ 도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 변경 용역

◦ 읍면지역 안전한 도로망 확충 정비

◦ 읍면지역시도 정비현황

◦ 농어촌도로 정비현황

◦ 통행불편 마을진입로 정비현황

◦ 위험도로 선형개선

◦ 도로 유지관리사업

◦ 지방하천 정비사업

◦ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업

◦ 소하천정비 종합계획 재수립 용역

◦ 소하천 정비사업

◦ 요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성

◦ 하천 유지관리사업

◦ 하천 유지관리사업(신규/보조)

□ 5분발언 추진상황

일  반  현  황

□ 기    구

											건 설 과 장
											진 영 신
건설행정담당										도로담당														하천담당
양 병 오										김 현 호														백 강 규
설해대책추진 도로 유지 관리․보수 도로 점‧사용 허가 국‧공유 재산관리 노점상‧과적 단속										읍면시도 확․포장사업 농어촌도로 확․포장사업 기업유치 기반시설 확충사업 통행불편 도로사업 도로 유지 관리사업														치 수 사 업 하천유지관리 육상골재채취․허가 공유수면관리 하천점․사용허가

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	35	1	3	7	4	4	□공 무 직 : 16
현 원	34	1	6	5	1	5	□공 무 직 : 16 - 휴직(1) 포함
증 감	△1	-	3	△2	△3	1	-

2020년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 지방재정 확충을 위한 국가예산 확보에 총력 - 국도․국지도 건설 5개년 계획(`21~`25) 사업 반영 대응(5개 노선) ·국도 24호선(이백~운봉) 2차로 개량, 국지도 37호선(인월~아영) 2차로 확장 및 개량, 국지도 60호선(주천 호경~고기) 2차로 개량, 국도 24호선 (대강 ~ 대산) 2차로 개량, 동부내륙권(정읍~남원) 2차로 개량 ·대강 하이패스 I.C 설치(한국도로공사) / ※ 타당성 용역 중 ·춘향휴게소(순천~완주간 고속도로) 조기 착공 / ※ 건축 신축 협의 중 ◦ 체계적인 도로망 개설로 지역 균형발전 도모 - 주민 실생활에 밀접한 도로망 확충으로 농촌지역 주민 교통 편익 증진 및 정주여건 향상 도모 - 통행불편 마을 진입로(아영 신지) 도로 개설 및 위험도로(이백 초촌, 수지 호곡) 신규 노선 착공에 따른 주민 불편 해소 및 쾌적한 도로망 확충에 기여 ◦ 시민 만족 중심의 도로·하천 유지관리 추진 - 도로 유지관리 : 7개 분야 / 125개소 / 14,356백만원 - 하천 유지관리 : 하도준설 및 잡목제거 12개소, 하천·기성제 유지관리 13개소 / 2,016백만원 - 법정 관리도로 총 57개 노선 431km에 대해 겨울철 제설작업, 노후포장도로 정비, 과속방지턱 정비, 도로안전시설물 설치 등 도로 유지관리 총력 - 하천 장비임차료 읍면동 자체예산 편성(600백만원)을 통한 응급 복구 및 준설 완료 - 국가하천(요천, 섬진강), 지방하천 하천시설물 정밀안전진단 추진(32건) - 소하천 호안정비를 통해 재해위험 및 수해예방을 위한 특별조정교부금 확보 추진(400백만원) ◦ 요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성 추진 - 가족단위 관광체험형 종합 물놀이 분수광장 조성을 위한 요천 수변관광 자원화 사업 국도비(동부권특별회계) 42억 확보 ◦ 소하천 정비사업 총사업비 변경 승인 - 오롱골소하천 정비사업(`20.3.13) [당초:1,865백만원 → 변경:2,350백만원(증485백만원)]

□ 지역 균형발전을 위한 도로개설 - 27개 지구 / 5,620백만원

(27개 지구 중 1개 지구 완공) - 추진공정 44%

◦ 읍면지역시도 확포장 4개 지구(L= 8.0㎞, 1,300백만원)

◦ 농어촌도로 확포장 7개 지구(L= 12.38㎞, 800백만원)

◦ 통행불편 마을진입로 12개 지구(L= 6.73㎞, 1,620백만원) / 1개 지구 완공(L=0.31㎞)

◦ 위험도로 선형개량 4개 지구(L= 3.06㎞, 1,900백만원)

□ 안전하고 쾌적한 도로 유지관리 – 73개 지구 / 4,653백만원

◦ 관내 주요 도로 아스콘 재포장 : 8개 지구 / 5.0㎞ / 515백만원

- 백공산4가~남원I.C, 주천 웅치삼거리~지리산 유스캠프 아스콘 재포장 등

◦ 걷고 싶은 거리 조성(인도 정비 및 탄성포장) : 5개 지구 / 3.92㎞ / 763백만원

- 걷고 싶은 가로환경 조성(도통, 월락), 시청로 ~ 털보식당 인도 개선 등

◦ 교량(터널) 유지관리사업 : 9개 지구 / 1,468백만원

- 교량 내진보강공사(남원대교, 동림교, 왕정교, 율천교) 및 교량 정밀안전점검 등

◦ 기타 지역 도로유지관리 사업 추진 : 51개 지구 / 1,907백만원

- 조산 회전교차로, 문오선(LPG 충전소 ~ 미목공예) 도로 정비 등

◦ 도로 제설작업(2019~2020)	: 10일(57개노선, 431.5㎞)

□ 재해 사전예방을 위한 하천정비 – 11개 지구 / 28,256백만원

◦ 지방하천 정비	:  3개소 / 10,470백만원

◦ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성	:  1개소 /  3,000백만원

◦ 소하천 정비(보조)	:  5개소 /  6,144백만원

◦ 하천 유지관리(지방하천, 소하천)	:  1식   /  1,714백만원

◦ 하천 유지관리(국가하천, 기성제, 수경시설 등)	:  1식   /  6,928백만원

	하반기 추진방향
◦ 각종 민원업무를 친절하고 신속한 처리로 시정에 대한 불만 해소 ◦ 관내 주요 간선도로망 확충을 위한 국가예산확보 적극 대응 ◦ 하천정비사업을 통해 이·치수와 더불어 친수 공간 조성에 기여 ◦ 태풍 및 집중호우로 인한 하천재해를 사전에 예방하기 위한 하도준설 추진

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

도로 설해 관리 대책

□ 개    요

◦ 운영 기간 : 2020. 11. 15. ~ 2021. 3. 15.(4개월간)

◦ 제설 대상 : 법정관리도로 총 57개 노선 431.5km

계		시 관리국도		지 방 도		시 도		읍면시도(군도)
노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량
57	431.5	3	25.1	8	154.9	24	38.5	22	213

◦ 제설 인력 : 26명 [도로보수원 11, 운전원 9(자체 3, 용역 6), 기타 6(용역6)]

◦ 제설 차량 : 13대 [15톤 6(임차3), 5톤 2(임차1), 1톤 4(임차2), 굴삭기1]

◦ 제설 장비 : 279대

- 자체 보유 :  27대(제설기 12, 살포기 12, 교반기 1, 저장탱크 1, 호이스트 1)

- 읍면동(19) : 252대(트랙터용제설기 249, 1톤용제설기 3)

◦ 상황실 운영 : 건설과(2개조 5명), 각 읍면동사무소

◦ 제설자재

(단위 :톤)

초 기 확 보 량				사 용 량				잔 량
계	염화칼슘	소금	친환경제설제	계	염화칼슘	소금	친환경제설제	계	염화칼슘	소금	친환경제설제
2,531	356	1,678	497	929	47	733	149	1,602	309	945	348

□ 추진실적

◦ 설해대책 추진계획 수립 및 제설자재구입	: ‘19. 10. ~ ‘20. 1.

◦ 도로제설작업 추진(10회)	: ‘19. 12. ~ ‘20. 2.

- 강설일수 19일, 적설일수 10일(대설경보 1회, 대설주의보 1회)

- 투입장비 : 13대〔15톤 6(임차3), 5톤 2(임차1), 1톤 4(임차2), 굴삭기 1〕

□ 금후계획

◦ 미끄럼주의표지판(22개) 및 모래주머니(20,000매) 설치 : ‘20. 10.

◦ 상황실[건설과(2개조 5명), 읍면동] 운영	: ‘20. 11.

◦ 제설차량 임차시행(15톤 3대, 5톤 1대, 1톤 2대)	: ‘20. 12.

◦ 정령치 도로 통제(고기리삼거리 ~ 정령치 ~ 달궁삼거리)	: ‘20. 12. ~ ‘21. 3.

도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 변경 용역

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 읍면지역

◦ 사 업 량 : 읍면지역시도 및 농어촌도로 353개 노선 L=852.6㎞

◦ 사 업 비 : 500백만원(시비)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2020년(3개년)

◦ 도급업체 : ㈜수성엔지니어링(경남 창원), ㈜성원기술개발(전북 김제)

□ 추진실적

◦ 기본계획 변경 용역 수행	: `18. 4. ~

◦ 농어촌도로 전략환경영향평가 / 사전재해영향성검토 용역 착수 : `18. 11.

◦ 도로건설계획, 농어촌도로 기본계획(변경) 의견반영(읍면동) : `19. 5. ~ 8.

◦ 군도 및 농어촌도로 개선(안) 의견 수렴(남원시의회)       : `19. 11.

< 노선 검토 주요방향 >

◦ 군도 : 도로 개설 실효성 검토, 상위도로로 인한 단절구간 연결(중복결정)

◦ 농어촌도로 : 읍면 의견 수렴에 따른 노선 지정, 마을 주 진입도로

일제 노선 반영, 격하된 군도 노선 신규 지정

< 검토(안) >

(단위 : km)

구 분	당 초		변 경		증 △감
	노선 수	연장	노선 수	연장	노선 수	연장
합 계	353	852.6	410	891.6	57	39.0
군 도	22	215.1	21	164.7	▽ 1	▽ 50.4
농어촌도로	331	637.5	389	726.9	58	89.4

□ 금후계획

◦ 용역 보고회 개최	: `20. 6.

◦ 인접 시군(도) 협의 및 협의의견 검토	: `20. 6.

◦ 전략환경영향평가 및 사전재해영향성검토 용역 수행    : `20. 6. ~ 7.

◦ 도로건설 관리계획 수립 및 농어촌도로 변경 고시	: `20. 8.

읍면지역 안전한 도로망 확충 정비

□ 개    요

◦ 사업규모 : 도로 정비사업 27개 지구, L = 30.17㎞

◦ 총사업비 : 62,520백만원 (2020 : 5,620백만원)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2025년(9개년)

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 량		총사업비	기투자	2020	2020이후	사업기간
계	27개지구	L=30.17㎞	62,520	22,175	5,620	34,725
읍면지역시도	4개지구	L=8.0㎞	23,600	6,600	1,300	15,700	`17~`22
농어촌도로	7개지구	L=12.38㎞	20,750	5,850	800	14,100	`17~`25
통행불편	12개지구	L=6.73㎞	12,970	7,530	1,620	3,820	`17~`21
위험도로 선형개선	4개지구	L=3.06㎞	5,200	2,195	1,900	1,105	`17~`21

□ 추진실적

◦ 읍면지역시도 : 공사 중(오리정~상신, 부석~오촌, 도산~서매, 평촌~강기)

◦ 농어촌도로   : 공사 중[행덕선, 도용선, 상황선, 배촌선(중송), 영촌선]      설계 중(배촌선, 견두선)

◦ 통행불편     : 완공(아영 신지), 공사중(아영 구지, 운봉 장동, 인월 중군, 보절 내황, 대산 안대실, 송동 신기, 이백 오산길, 인월 장평, 덕과 수촌, 주천 제바위), 설계중(이백 목가)

◦ 위험도로     : 공사중(이백 초촌, 수지 호곡, 군도 29호선, 수지 남창)

□ 금후계획

◦ 읍면지역시도 : `20년 완공(오리정~상신), `21년 완공(부석~오촌, 도산~서매),

(4개 지구)      `22년 완공(평촌~강기)

◦ 농어촌도로   : `20년 완공(행덕선), `21년 완공[도용선, 상황선, 영촌선,

(7개 지구)      배촌선(중송)], `23년 완공(부흥선), `25년 완공(견두선),

◦ 통행불편     : `20년 완공(보절 내황, 송동 신기, 덕과 수촌)

(12개 지구)     `21년 완공(아영 구지, 운봉 장동, 인월 장평, 인월 중군,

주천 제바위, 이백 오산길, 대산 안대실, 이백 목가)

◦ 위험도로     : `20년 완공(군도29호선, 수지 남창),

(4개 지구)      `21년 완공(수지 호곡, 이백 초촌)

읍면지역시도 정비현황

□ 개    요

◦ 계    획 : 19개 지구 / 36.46㎞ / 72,530백만원

◦ 기 투 자 : 15개 지구 / 28.46㎞ / 48,930백만원

◦ 시 행 중 :  4개 지구 /  8.00㎞ / 23,600백만원(※ 2020 : 1,300백만원)

- `20 완공 : 1개 지구, `21 완공 : 2개 지구, `22 완공 : 1개 지구

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2022년(17개년)

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2020	2021이후
합 계	4개지구	8.00	23,600	6,600	1,300	15,700	33
부석~오촌	송동면	2.60	5,900	2,100	200	3,600	39	`17 ~ `21
오리정~상신	사매면	1.00	2,300	1,600	700	-	100	`17 ~ `20
평촌~강기	이백면	2.50	13,900	2,500	200	11,200	19	`17 ~ `22
도산~서매	주생면	1.90	1,500	400	200	900	40	`19 ~ `21

□ 추진실적

◦ 부석~오촌     : 2차분 추진(토공, 배수공) / 공정률 30%

◦ 오리정~상신   : 3차분 추진(L형측구, 보조기층 포설) / 공정률 90%

◦ 평촌~강기

□ 평촌~목가	: 1차분 추진(토공, 배수공, 교량공) / 공정률 30%

□ 목가~강기  : 용지보상 추진

◦ 도산~서매	: 1차분 추진(토공, 구조물공), 용지보상 추진 / 공정률 5%

□ 금후계획

◦ 2020년 완료   : 1개 지구(오리정~상신)

◦ 2021년 완료   : 2개 지구(부석~오촌, 도산~서매)

◦ 2022년 완료   : 1개 지구(평촌~강기)

농어촌도로 정비현황

□ 개    요

◦ 계    획 : 24개 지구 / 28.54㎞ / 50,774백만원

◦ 기 투 자 : 17개 지구 / 16.16㎞ / 30,024백만원

◦ 시 행 중 :  7개 지구 / 12.38㎞ / 20,750백만원(※ 2020 : 800백만원)

- `20 완공 : 1개 지구, `21 완공 : 5개 지구, `22 이후 : 1개 지구

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2025년(18개년)

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2020	2021이후
합 계	7개지구	12.38	20,750	5,850	800	14,100	32
부흥선	보절면	1.20	2,100	-	200	1,900	10	`20 ~ `23
도용선	주생면	0.67	1,650	1,000	100	550	67	‘17 ~ ‘20
상황선	산내면	0.60	2,100	1,050	100	950	55	‘18 ~ ‘20
견두선	수지면	4.00	6,000	700	100	5,200	13	‘18 ~ ‘25
배촌선	주천면	3.56	5,500	700	200	4,600	16	‘19 ~ ‘21
영 촌 선	주생면	1.10	1,800	800	100	900	50	`19 ~ `21
행덕선	운봉읍	1.25	1,600	1,600	-		100	‘17 ~ ‘20

□ 추진실적

◦ 도 용 선	: 도로 선형 변경 설계 검토 및 토지주 사전 협의 / 공정률 30%

◦ 상 황 선     : 용지보상(85%), 1차분 추진(토공, L형옹벽) / 공정률 25%

◦ 견 두 선	: 실시설계, 소규모 환경영향평가, 사전재해영향 추진 중

(`19. 11. ~), 문화재 지표조사 용역 완료(3. 18.)

◦ 배 촌 선	: 실시설계(공정 80%), 배촌선(중송) 1차분 추진(순성토 및 개거)

◦ 영 촌 선	: 1차분 추진(토공), 2차분 착공(5. 14.) / 공정률 5%

◦ 행 덕 선     : 3차분 추진(배수공-종배수관, 보조기층 포설) / 공정률 80%

□ 금후계획

◦ 2020년 완료  : 1개 지구(행덕선)

◦ 2021년 완료  : 4개 지구(도용선, 상황선, 영촌선, 배촌선(중송))

◦ 2023년 완료  : 1개 지구(부흥선)

◦ 2025년 완료  : 1개 지구(견두선)

통행불편 마을진입로 정비현황

□ 개    요

◦ 계    획 : 51개 지구 / 30.11㎞ / 27,086백만원

◦ 기 투 자 : 39개 지구 / 23.38㎞ / 14,116백만원

◦ 시 행 중 : 12개 지구 /  6.73㎞ / 12,970백만원(※ 2020 : 1,620백만원)

- `20 완공 : 4개 지구, `21 완공 : 8개 지구

◦ 사업기간 : 2008 ~ 2021년(14개년)

□ 추진실적

◦ 실시설계 : 1지구

- 이백 목가

◦ 공사 착공  : 2지구

- 아영 구지, 운봉 장동

◦ 공 사 중 : 8지구

- 인월 중군, 보절 내황, 대산 안대실, 송동 신기, 이백 오산길,

인월 장평, 덕과 수촌, 주천 제바위,

◦ 공사완료 : 1지구

- 아영 신지

□ 금후계획

◦ 2020년 완료 : 3개 지구

- 보절 내황, 송동 신기, 덕과 수촌

◦ 2021년 완료 : 8개 지구

- 이백 목가, 아영 구지, 운봉 장동, 인월 장평, 인월 중군, 주천 제바위, 이백 오산길, 대산 안대실

□ 통행불편 마을진입로 정비사업 세부내역

사 업 명	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	추진실적	계획
		계	기투자	2020	2021 이후
12개 지구	6.73	12,970	7,530	1,620	3,820	70.7
이백 목가마을 (`19~`21)	0.80	1,900	150	200	1,550	18	실시설계	용지보상, 공사발주
아영 구지마을 (`19~`21)	0.34	700	400	100	200	71	공사발주	용지보상, 시공
운봉 장동마을 (`19~`21)	0.45	500	200	100	200	60	착공, 용지보상	용지보상, 시공
인월 장평마을 (`19~`21)	0.50	1,800	380	500	920	49	착공, 용지보상	용지보상, 시공
인월 중군마을 (`17~`21)	0.78	1,550	1,550	-	-	100	-1공구 : 시공 -2공구 :실시설계	-1공구 : 시공 -2공구 : 발주
대산 안대실마을 (`18~`21)	0.46	1,250	1,250	-	-	100	용지보상	용지보상, 시공
주천 제바위마을 (`19~`21)	0.65	900	300	100	500	44	시공, 용지보상	용지보상, 시공
이백 오산길 (`19~`21)	0.78	850	300	100	450	47	시공, 용지보상	용지보상, 시공
덕과 수촌마을 (`19~`20)	0.15	200	200	-	-	100	시공, 용지보상	완공 (`20.11월)
보절 내황마을 (`17~`20)	1.04	1,620	1,100	520	-	100	시공, 용지보상	완공 (`20.12월)
송동 신기마을 (`19~`20)	0.47	500	500	-	-	100	시공	완공 (`20. 7월)
아영 신지마을 (`17~`20)	0.31	1,200	1,200	-	-	100	시공	완공 (`20. 5월)

위험도로 선형개선

□ 개    요

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2020	2021이후
합 계	4개지구	3.06	5,200	2,195	1,900	1,105	78.9
이백 초촌	이백면	0.60	900	-	900	-	100	`20 ~ `21
수지 호곡	수지면	0.40	2,200	95	1,000	1,105	50	`19 ~ `21
군도29호선 (지리산IC~아영면사무소)	아영면	1.3	1,600	1,600	-	-	100	‘17 ~ ‘20
수지 남창	수지면	0.76	500	500	-	-	100	`18 ~ `20

□ 추진실적

◦ 이백 초촌	: 공사 착공(3. 27.), 보상계획 공고 및 감정평가

◦ 수지 호곡	: 공사 착공(3. 25.), 1차분 추진(교량공) / 공정률 5%

◦ 군도29호선(아영) :  2․3차분 추진(토공 및 배수공) / 공정률 60%

◦ 수지 남창	: 용지보상 협의(14%) / ※ 공사 착공 : `19. 11. 29.

□ 금후계획

◦ 2020년 완료	: 2개 지구[군도29호선(지리산IC~아영면), 수지 남창]

- 군도29호선 :  1공구(배수공, 구조물공), 2 ․ 3공구(포장공, 부대공)

- 수지 남창  :  용지보상 협의 및 공사 추진(토공, 배수공, 구조물공)

◦ 2021년 완료	: 2개 지구(이백 초촌, 수지 호곡)

- 이백 초촌  : 용지보상 협의 및 공사 추진(토공, 배수 구조물)

- 수지 호곡 : 용지보상 협의 및 공사 추진(교량공, 토공․배수공)

도로 유지관리사업

□ 개    요

◦ 총사업비 : 8,736백만원(국비 140, 도비 381, 시비 8,215)

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비(백만원)	비 고
합 계		21개 지구	8,736
읍면지역시도	관 내	4개 지구	1,304
농어촌도로	관 내	2개 지구	750
법정도로 유지관리	관 내	15개 지구	6,682

□ 추진실적(2020년) - 98개 지구 / 5,710백만원

◦ 읍면지역시도 유지관리

- 산동 석동마을 진출입로 정비 외 30개소 840백만원 추진

◦ 농어촌도로 유지관리

- 대산 금풍로 도로 정비공사 공사 외 15개소 550백만원 추진

◦ 법정도로 유지관리(재포장)

- 조산 회전교차로 설치공사 외 50개소 4,320백만원 추진

□ 금후계획

◦ 읍면지역시도·농어촌도로·동지역 법정도로 유지관리 추진 : `20. 6. ~ 12.

- 아스콘 재포장, 과속방지턱, 교량(터널) 유지관리, 배수개선, 시설물 정비 등

◦ 공사 완료 : 산동 석동마을, 군도 3호선 갓길, 인월 성산 진입로 정비,

시청로~털보식당 인도, 식정마을 앞 인도, 걷고싶은 거리 조성, 고죽       ~ 갈치 교차로, 조산교차로 회전로, 주천 용궁 스노우 멜팅, 교량 내진보강 등

◦ 공사 추진 : 사매~덕과 도로 구조개선

□ 도로 유지관리사업 세부내역(2020년)

사 업 명		사업위치	사업량	사업비 (백만원)	추 진
합 계			21개 지구	8,736
읍면지역시도 유지관리			4개 지구	1,304
	시도유지관리	관내	유지관리사업 1식	600
	산동 석동마을	산동면	진출입로 정비 L=0.25㎞	200	`19 : 150
	군도 3호 갓길 포장(방촌)	금지면	아스콘 포장 L=0.4㎞	44
	주민참여예산(운봉, 산동 노암)	관내	유지관리사업 3개소	460
농어촌도로 유지관리			2개 지구	750
	농어촌도로 유지관리	관내	유지관리사업 1식	600
	인월 성산 진입로 정비	인월면	도로 시설개량 L=0.15㎞	150
법정도로 유지관리			15개 지구	6,682
	도로 유지관리보수(시가지)	관내	유지관리사업 1식	650
	사매~덕과 도로 구조개선	사매면, 덕과면	도로 시설개선 L=4.3㎞	200
	시청로~영어마을 인도 정비	도통동	인도 및 도로 구조개선 L=0.26㎞	500
	식정마을 앞 인도 개설	식정동	인도개설 L=0.14㎞	300
	걷고 싶은 거리 조성	관내	인도 유지관리 L=5.1㎞	500
	고죽~갈치 교차로 도로	고죽동	도로 확포장 L=0.43㎞, B=25m	500	`17 ~ `19 : 2,100
	조산교차로 회전로 설치	조산동	회전교차로 1식	280	국 140 시 140
	법정도로 재포장	관내	아스콘 재포장 L=5.0㎞	1,500
	주천 용궁 스노우멜팅	주천면	스노우멜팅 설치 L=0.13㎞	72	도 36 시 36
	로드킬 방지 도로시설물	관내	로드킬 휀스 L=7.1㎞(관문도로)	150	`19 : 150
	교량(터널) 유지관리	관내	교량 유지보수(시특법 6개)	300
	법정관리 대상시설물 정밀 안전점검	시특법 2종 5개소	정밀 안전점검 1식	150	소방 45 시 105
	노후교량 정밀 안전진단	의총교 축천교	정밀 안전진단 1식	80
	시특법 교량 내진보강	남원대교 동림교	내진보강공사 1식(받침교체)	500	`19: 1,100
	교량 내진보강(왕정, 율천)	왕정교 율천교	내진보강공사 1식(받침교체)	1,000	소방 300 시 700

지방하천 정비사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 아영면 풍천 외 3개소

◦ 사업기간 : 2012 ~ 2022년(11개년)

◦ 총 계 획 : 21개 지구 / 98.43㎞ / 190,771백만원

- 완료지구 : 13개 지구 / 45.05㎞ / 105,918백만원

(송내천, 내척천, 괴양천, 진기천, 백암천, 운교천, 풍천, 요천, 수외천, 수지천, 주촌천, 갈치천, 람천)

- `20년 사업 : 4개 지구 / 13,470백만원(도비 9,429, 시비 4,041)

하천별	지구별	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2020	2021이후
합 계	4개하천	22.94	78,128	27,044	13,470	37,614	35
풍 천	소 계	5.50	37,351	16,008	5,800	15,543	43	`14 ~ `22
	청계지구	0.88	6,961	6,961			100	`17년준공
	풍천지구	4.62	30,390	9,047	5,800	15,543	30	`18 ~ `22
송치천	주천송치	2.04	9,466	6,796	2,670		72	`16 ~ `20
원천천	신촌~주천	13.7	23,583	3,200	3,000	17,383	14	`17 ~ `22
다산천	덕과만도	1.7	7,728	1,040	2,000	4,688	13	`18 ~ `22

※ 지방하천(2개소)『익산지방국토관리청』실시설계 총사업비(3차)승인 완료

┍ 원천천 : 당초(MP) 18,821백만원 ⇨ 설계금액23,583백만원(증 4,762 / 증 25.3%)

┕ 다산천 : 당초(MP)  4,554백만원 ⇨ 설계금액 7,728백만원(증 3,174 / 증 69.7%)

□ 추진실적

◦ 풍  천(인월·두락·의지) : 2차분 시행(의지지구 L=2.1km) 취암교 등    / 공정률 30%

◦ 송치천 : (3차분) 타절준공, 잔여분 공사 추진중	/ 공정률 72%

◦ 원천천 : 익산청(3차) 승인, 도 기술심의, 1차분 추진중  / 공정률 14%

◦ 다산천 : 익산청(3차) 승인, 설계 기술자문, 1차분 추진중 /  공정률 13%

□ 금후계획

◦ 2020년 완료 : 1개 지구(송치천)

◦ 2022년 완료 : 3개 지구(풍천, 원천천, 다산천)

원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도통동 인도교 ~ 주천면 고기리 일원

◦ 사 업 량 : 관광자원화 친수공간 조성 L=13.7㎞

- 축제 2.78km, 호안 5.16km, 자전거길 6.6㎞, 보․낙차공 12개소, 교량 9개소 등

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2022년(6개년)

◦ 총사업비 : 23,583백만원(국비 1,600, 도비 14,908, 시비 7,075)

※ 『익산지방국토관리청』 실시설계(3차) 협의 승인(‘19. 11. 4.)

- 당초(MP) 18,821백만원 ⇨ 설계금액 23,583백만원(증 4,762 / 증 25.3%)

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진                          : `16.  9. 28.

◦ 용역 중간보고회 개최(시장)	: `18.  8.  3.

◦ 주민설명회 개최	: `18. 11. 29.

◦ 실시설계(안) 총사업비 변경 협의(1차) 요청 / 익산청   : `19.  3. 29.

- 사업비 : 당초 MP상 18,821백만원 → 24,147백만원(증 5,326)

◦ 설계VE 완료(총사업비 100억원 이상 건설공사)         : `19.  5.  3.

◦ 실시설계(안) 총사업비 변경 협의(2차) 요청 / 익산청    : `19.  7. 19.

- 사업비 : 당초 MP상 18,821백만원 → 23,139백만원(증 4,318 / 증 23%)

◦ 지방건설기술심의(전북도)                            : `19.  9. 23.

◦ 조달청 원가심사 및 공사발주 의뢰                    : `19. 10.  8.

◦ 실시설계(안) 총사업비 변경 협의(3차) 승인 / 익산청    : `19. 11.  4.

- 사업비 : 당초 MP상 18,821백만원 → 23,583백만원(증 4,762 / 증 25.3%)

◦ 시설공사 도급업체 선정 및 착수                      : `19. 12. 23.

□ 금후계획

◦ 시설공사 1차분 추진 및 준공	: `20. 5. ~ 12월

- 편입용지 토지 협의 매수 병행 추진

◦ 시설공사 총괄분 준공	: `22. 12월

소하천정비 종합계획 재수립 용역

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 관내 소하천 347개소(L=389.6㎞)에 대한 종합계획 재수립

◦ 총사업비 : 5,837백만원(시비 100%)

◦ 용역기간 : 2015 ~ 2019년(5개년)

◦ 용역대상 : 347개소 / L=389.6㎞를 2개 권역으로 용역 발주

(단위 : 백만원)

권 역 별	사업량	총사업비	투자	용역기간
합 계	347개소/L=389.6㎞	5,837	5,837	`15 ~ `19
섬진강 권역	272개소/L=292.4㎞	3,572	3,572	‘15 ~ ‘19
낙동강 권역	75개소/L=97.2㎞	1,315	1,315	‘16 ~ ‘19
전략환경평가	전구간	950	950	‘17 ~ ‘19

□ 추진실적

◦ 소하천정비 종합계획 재수립 용역 시행

- 섬진강 수계 : `15. 7. 31. / 낙동강 수계 : `16. 4. 15. / 전략환경영향평가 : `17. 9. 20.

◦ 소하천 중복지정 관리기관 협의(한국농어촌공사 남원지사) : `15. 10. / `18. 11.

◦ 전북도 자연재난과 협의(1차) 및 검토의견 반영  : `19. 4. 4. ~ 4. 29.

◦ 전략환경영향평가(본안) 협의요청               : `19. 6. 5.

◦ 기초 소하천관리 위원회 심의(서면심의)         : `19. 7.

◦ 전북도 자연재난과 및 관련실과 협의           : `19. 12.

◦ 소하천 지정(신규·폐지·조정)(안)

수 계	당 초		변 경		증 ․ 감(△) 연장(km)	증 ․ 감(△)률 연장(%)	비 고
	개소	연장(km)	개소	연장(km)
합 계	349	392.1	311	386.3	△5.8	△1.5	∘폐지:59개소 ∘신규:21개소
섬진강	274	294.9	240	291.4	△3.5	△1.2	∘폐지:53개소 ∘신규:19개소
낙동강	75	97.2	71	94.9	△2.3	△2.4	∘폐지: 6개소 ∘신규: 2개소

◦ 광역 소하천관리 위원회 심의(도 자연재난과)    : `19. 12. 10.

◦ 광역 소하천관리 위원회 심의 조치결과 제출    : `19. 12. 30.

◦ 남원시 소하천정비 종합계획(재수립) 승인(도 자연재난과)    : `20.  4. 17.

□ 금후계획

◦ 소하천대장 전산화 및 지형도면고시, 사업완료   : `20. 6월 말

소하천 정비사업

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 30개지구 / 20.78㎞ / 44,511백만원

- 완료지구 :  6개지구 /  4.31㎞ / 13,417백만원

(뒤하천, 율치천, 율정천, 아곡천, 신동천, 장교천)

-‘20년사업 : 7개지구 / 6,144백만원〔시비 6,144 (100%)〕※ 균특 지방이양에 따른 시비 부담금 증액

◦ 위    치 : 수지면 고평천 외 6개소

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2023년 (8개년)

구분	지구별	위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
				계	기투자	2020	2021이후
합 계		7개 하천	10.76	29,970	11,216	6,144	12,610	57
보조	소계	5개 하천	7.35	26,870	8,116	6,144	12,610	53
	고평천	수지 고평	2.30	7,745	5,524	2,221	-	100	‘16~‘20
	당동천	아영 봉대	2.69	10,711	2,220	1,830	6,661	37	‘18~‘22
	오롱골천	운봉 주촌	0.82	1,865	372	1,493	-	100	‘19~‘21
	과립천	이백 과립	2.20	4,180	-	300	3,880	7	‘20~‘23
	산곡천	향교동	1.25	2,369	-	300	2,069	12	‘20~‘22
자체	소계	2개 하천	1.85	3,100	3,100	-	-	100
	천사천	월락동	0.50	1,600	1,600	-	-	100	‘19~‘20
	양선천	덕과 신양	1.00	1,500	1,500	-	-	100	‘19~‘20

□ 추진실적

◦ 고평천 : 5차분 추진 (하천정비 L=0.4km) 및 교량 1개소 등	/ 공정률 30%

◦ 당동천 : 1차분 추진 (하천정비 L=0.8km) 및 교량 3개소 등	/ 공정률 10%

◦ 오롱골천 : 1차분 추진(하천정비 L=0.7km) 및 교량 1개소 등	/ 공정률 20%

◦ 과립천,산곡천 : 실시설계 용역 추진(`20. 1. ~ 7.)	/ 공정률 60%

◦ 천사천,양선천 : 시설공사(총괄) 추진 및 편입토지 보상           / 공정률 70%

□ 금후계획

◦ 2020년 완료 : 3개 지구(고평천, 천사천, 양선천)

◦ 2021년 완료 : 1개 지구(오롱골천)

◦ 2022년 완료 : 2개 지구(당동천, 산곡천)

◦ 2023년 완료 : 1개 지구(과립천)

요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성

< 요천 수변 관광자원화 사업 >

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 어현동 741번지 일원 / 요천 국가하천[고수부지/천변친수지구]

◦ 사 업 량 : 물놀이 분수광장 조성

- 음악분수 L=42m, 바닥분수 2개소 및 광장, 물놀이시설 A=1,170㎡

◦ 총공사비 : 9,150백만원[도비(동부권특별회계) 4,150, 시비 5,000]

- `20년 사업비 : 5,650백만원(도비 4,150, 시비 1,500)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2020년(4개년)

□ 추진실적

◦ 요천 내 수경시설 설치 추진계획 보고           : `17.  6. 28.

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진                   : `17. 10. ~ `18. 12.

◦ 사업계획 변경 추진보고                       : `18. 11. 23.

※ 당초 : 수경시설(분수) / 중앙저수로 ⇨ 변경 : 물놀이 분수광장 / 고수부지

◦ 음악분수 공법선정 심의 완료                  : `19.  6. 17.

◦ 2019년 제2차 재정투자 재심의 완료(전북도)     : `19.  6. 28.

◦ 원가심사 및 공사발주 의뢰(조달청)             : `19.  8. 26.

◦ 하천점용허가 승인(익산청)                     : `19.  9. 30.

◦ 시공업체 선정 및 공사 착수	: `19. 10. 29.

- 새움종합건설 대표이사 : 안석문[전주시 완산구 우전로 260 세움펠리피아빌딩 3층]

□ 금후계획

◦ 시설공사 추진 및 준공	: `20. 5. ~ `20. 9.

◦ 음악분수 및 물놀이 시설 운영	: `20. 7. ~

◦ 시설물 인수인계 추진	: `20. 9. ~

하천 유지관리사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 소하천‧지방하천‧국가하천 일원

◦ 사 업 량 : 3개사업 / L =77.8km

◦ 사 업 비 : 2,994백만원(국비 976, 도비 152, 시비 1,866)

◦ 사업기간 : 2020년

구 분	사업내용	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
합 계	3개 사업	77.8	2,994
하천 유지관리사업	하천 유지관리	15	600
	하천 하도준설	20	500
	주민참여예산	1.6	614
기성제 유지관리사업	지방하천 기성제 정비	2.3	304
국가하천 유지보수사업	국가하천 섬진강, 요천 유지관리	섬진강 21.0 요 천 17.9	976

□ 추진실적

▸ 하천 및 기성제(지방하천) 유지관리사업

◦ 읍·면·동 하천 유지관리사업 대상지 제출 및 현지조사	: ‘19. 12. 11.

◦ 유지관리사업 실시설계 추진(1차,2차)	: ‘19. 12. 13.

◦ 유지관리사업 실시설계 추진(3차)	: ‘20. 4. 7.

◦ 하천 및 기성제(지방하천) 유지관리사업 추진	: ‘20. 2. 26.

- 하도준설 이백면 채곡천 외 12개소(L=3.90km) 중 5개소 완료(L=1.49km) 및 8개소 추진 중

- 유지관리 송동면 생촌천 외 10개소(L=1.51km) 중 5개소 완료(L=0.45km) 및 6개소 추진 중

- 하도준설 대강면 사석천 및 유지관리 이백면 백암천 외 9개소 설계 중

◦ 시특법 관리대상 배수통문 정밀점검 용역 완료(지방하천)	: ‘20. 3. 27.

▸ 국가하천 유지보수사업

◦ ‘20년 국가하천 유지보수 국비예산 교부	: ‘20. 3. 6.

◦ 시특법 관리대상 배수통문 외 정밀점검 및 성능평가 용역 추진(요천)	: ‘20. 2. 17.

◦ 국가하천 시설물 및 자전거도로 유지보수 용역 추진	: ‘20. 4. 20.

□ 금후계획

▸ 하천 및 기성제(지방하천) 유지관리사업

◦ 하반기 하천유지관리 대상지 조사 및 선정	: ‘20. 6. ~ 8.

◦ 하반기 하천유지관리사업 추진	: ‘20. 9. ~

◦ 하천유지관리 대상지 수시 점검 및 공사 추진	: 연중 수시

▸ 국가하천 유지보수사업

◦ 국가하천유지보수사업 추진(시설물 및 자전거도로 등)	: ‘20. 6. ~ 7.

◦ 국가하천유지보수 신규사업 익산청, 전북도 협의 추진	: ‘20. 10. ~

◦ 섬진강‧요천 보수 대상지 조사 및 공사추진	: 연중 수시

하천 유지관리사업(신규/보조)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 소하천·지방하천 일원

◦ 사 업 량 : 6개 사업 / L =1.03km

◦ 사 업 비 : 1,030백만원(특조 400, 도비 218, 시비 412)

◦ 사업기간 : 2020년

구 분	사업내용	사업량 (km)	사업비(백만원)
			계	특조	도비	시비
합 계	6개 사업	1.57	1,030	400	218	412
하천 유지관리사업 (보조)	풍촌천 소교량 재가설공사	1식	150		60	90
	함파천 재해위험시설 정비사업	0.44	300		90	210
	감성천 재해위험시설 정비사업	0.07	60		24	36
	이백면 뜰챙이골소하천 정비사업	0.20	200	200
	수지면 신평소하천 정비사업	0.10	100	100
	주생면 새터소하천 정비사업	0.10	100	100
	산동면 귀정사소하천 정비사업	0.12	120		44	76

□ 추진실적

◦ 사업계획서 제출 도비/특·조 교부결정 및 송금	: `19. 9. ~ `20. 4.

◦ 유지관리사업 실시설계 용역 및 공사추진 중	: `20. 2. ~

< 세부추진상황 >

- 풍촌천, 함파천, 감성천 : 공사 추진 중

- 뜰챙이천, 신평천, 새터천, 귀정사천 : 실시설계 용역 추진 중

□ 금후계획

◦ 행정절차 이행 및 하천유지관리 공사 준공 추진	: `20. 2. ~ 10.

□ 5분발언 추진상황