2020. 9.

2020년 주요업무 추진실적

환 경 사 업 소

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2020년 주 요 업 무  결산

□ 2020년 주요업무 추진실적

◦ 강우시 하수관로 시범사업

◦ 노후하수관로 정비사업

◦ 남원[3단계] 하수관로 정비사업

◦ 마을하수도 설치사업

◦ 남원공공하수처리시설 개선 및 운영관리

◦ 요천 생태습지공원 관리

◦ 운봉·인월 및 소규모 하수처리시설 관리대행

◦ 소규모 마을하수처리시설 개량사업

일  반  현  황

□ 기    구

									환경사업소장
									왕 길 성
하수경영담당					하수시설담당								하수처리담당										마을하수담당
박 병 준					강 자 청								유 홍 규										문 하 성
∘행정종합계획수립 ∘회계․시설물 관리 ∘공기업 특별회계 운영 ∘생태습지공원 관리					∘하수도 중장기계획 수립 및 추진 ∘하수관거정비, 마을하수도 사업 시행 및 유지관리								∘남원하수처리장 운영 ∘분뇨처리시설 운영 ∘하수슬러지 처리시설 관리·감독										∘운봉․인월 하수 처리장 운영 관리 ∘소규모하수처리시설 운영 관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	22	1	4	5	6	6	청 경 2 환경관리원 2 공 무 직 3
현 원	19	1	9	3	3	3	청 경 2 환경관리원 3 공 무 직 3
증 감	△3	-	5	△2	△3	△3	1

□ 하수처리시설 현황

총 64개소 (500㎥/일 이상 3개소, 500㎥/일 미만 61개소)

구 분	시설용량(㎥/일)	처리방법	비 고
남원하수처리장	50,000	심바이오공법
운봉하수처리장	800	회분식활성슬러지공법
인월하수처리장	1,000	회분식활성슬러지공법
소규모하수처리장	4,143	질소인고도처리 외 17개 공법	61개소

1. 남원하수처리장 현황

구 분	최 초	1차 증설	2차 증설
시설용량(㎥/일)	50,000	50,000	50,000
처리방법	표준활성슬러지법	심바이오	인제거장치
준공일자	1995.11.4.	2009.11.30.	2012.6.30.
부지면적(㎡)	34,980	36,505	36,505

2. 운봉· 인월 하수처리장 현황

구 분	운봉하수처리장	인월하수처리장
시설용량(㎥/일)	800	1,000
처리방법	회분식활성슬러지공법	회분식활성슬러지공법
준공일자	2006.5.30.	2006.5.30.
부지면적(㎡)	3,735	3,616

□ 요천 생태습지공원 현황

위치	조성 규모	준공일자	주요시설
주생면 중동리 1297	145,298㎡	2014.12.01.	생태탐방로, 야구장, 다목적구장, 애견놀이터, 모정 등

2020년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 강우시 하수관리 시범사업(차집관로, 남원[2단계]하수관로) 지속 추진 ◦ 하수관거정비사업(남원[3단계]하수관로, 노후하수관로) 본격 추진 ◦ 소규모 공공하수시설 단순관리대행으로 최상의 시설물 관리 및 하수처리 ◦ 요천 생태습지공원 지속적인 시설정비

□ 하수도시설 지속적인 확충 및 유지관리

◦ 강우시 하수관리 시범사업 및 하수관로 확충사업

- 하수관로(차집관로, 2단계 하수관로) 정비사업 지속 추진

- 남원[3단계]하수관로 및 노후하수관로 정비사업 본격 추진

◦ 운봉, 인월, 소규모 마을하수처리시설 완벽 운영관리

- 개량사업 추진 3개소(양평, 방촌, 비전)

- 기술진단 실시 14개소(운봉, 인월, 광평, 일대, 대정 등)

□ 하수처리 노후시설물 개선 및 최적운영으로 청정하천 수질보전

◦ 하수처리시설 방류수 수질기준 준수(2020.08.15.기준)

- BOD 1.9㎎/L(기준 5㎎/L), COD 7.9㎎/L(20㎎/L), SS 3.5㎎/L(10㎎/L),

T-N 11.840㎎/L(20㎎/L), T-P 0.064㎎/L(0.3㎎/L)

□ 하수처리장과 연계한 생태습지공원 운영·관리

◦ 방문자 현황 : 18,427명

- 생태습지공원 : 13,405명 (2019년 16,739명)

- 애견놀이터 : 5,022명/4,467마리 (2019년 : 1,350명/1,185마리)

◦ 요천 생태습지공원 수목 식재, 쉼터조성, 야구장 복토, 회랑 설치 완료

◦ 요천 생태습지공원 잡초제거 및 환경정비로 쾌적한 휴식공간 제공

2020년 주요업무 추진실적

강우시 하수관리 시범사업

□ 개    요

구 분		차집관로 정비사업		남원(2단계) 하수관로 정비사업
위 치		➢ 남원시 일원 (8개하천)		➢ 남원시 일원 (6개지역)
사 업 량		➢ 차집관로 정비 L=31km		➢ 하수관로 정비 L=57km ➢ 배수설비 3,620 가구
총사업비		➢ 37,686백만원(국25,041, 시12,645) ➢ 기투자 : 31,911‘20년 : 259		➢ 31,218백만원(국21,821, 시9,397) ➢ 기투자 : 22,055‘20년 : 851
사업기간		➢ 2018~2021		➢ 2018~2021

□ 추진실적

◦ 시범사업 대상 선정	: 2015. 02.

◦ 한국환경공단 위·수탁 협약 체결	: 2015. 03.

◦ 용역 발주	: 2015. 06.

◦ 기본설계 완료에 따른 VE검토 추진	: 2016. 05.

◦ 하수도정비기본계획(변경) 수립	: 2016. 05. ~ 07.

◦ 공사착공	: 2018. 10.

◦ 공 정 율 : 차집관로-65%, 2단계-73%	: 2020. 08월 현재

(차집:31km 중 20km완료, 2단계: 57km중 48km완료, 배수설비 3,620가구 중 2,649가구 완료)

□ 금후계획

◦ 전체사업 완료	: 2021. 12월 까지

- 차집관로 : 요천, 옥률천, 주촌천 일부 미완료지역 사업 추진

- 2 단 계 : 죽항동, 금동, 조산동 일부 미완료지역 사업 추진

노후하수관로 정비사업

◦ 노후하수관로 정밀진단(2016.04) 결과에 따른 정비로 도로함몰 등 안전사고에 선제적 대응

◦ 1993년 조성된 도통1택지는 당시 기 분류식화 되었으나 오접과 노후화된

우□오수관로 및 배수설비 정비 추진

□ 개    요

◦ 사업위치 : 남원시 일원(시청주변-도통택지1지구)

◦ 사업내용 : 노후하수관로 정비 L=6.9km, 배수설비 300여 가구

◦ 사 업 비 : 8,448백만원(국비 3,224, 시비 5,224)

※ 2020년 사업비 : 1,660백만원(국비 -, 시비 1,660)

- 국비 3,224백만원은 기 교부완료, 2020년은 미 반영된 시비반영

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: 2017. 02. ~ 2017. 11.

◦ 환경부 재원협의 등 행정절차 이행	: 2018. 05. ~ 2019. 07.

◦ 계약심의 완료                             : 2019. 08.

◦ 원가심사(전라북도) 완료	: 2019. 09.

◦ 공사발주                                  : 2019. 10.

◦ 입찰공고 및 적격심사                      : 2019. 11.

◦ 공사착공	: 2019. 12.

◦ 공 정 율 : 25%	: 2020. 08월 현재

(노후관로 6.9km 중 2.4km 완료, 배수설비 300가구 중 68가구 완료)

□ 금후계획

◦ 전체사업 완료	: 2021. 12월 까지

남원[3단계] 하수관로 정비사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원처리구역 및 운봉처리구역

- 향교, 신촌, 광치, 신정동, 이백(평촌, 효기)

주천(행정, 내송, 용궁, 무수, 배촌, 덕촌, 상주, 하주, 가송) 등

◦ 사업내용

- 남원처리구역 : 오수관로 설치 L=31.7km, 배수설비 1,760 가구

- 운봉처리구역 : 오수관로 설치 및 개량 L=15.2km

◦ 사 업 비 : 37,818백만원(국비 22,128, 시비 15,690)

※ 2020년 사업비 : 4,922백만원(국비 2,211 시비 2,711)

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

□ 추진실적

◦ 2018년 신규사업지구로 확정 내시	: 2017. 11.

◦ 기본 및 실시설계 용역시행	: 2017. 11. ~ 2019. 03.

◦ 행정절차 이행                             : 2019. 03. ~ 2019. 10.

◦ 공사착공	: 2019. 12.

◦ 공 정 율 : 15%	: 2020. 08월 현재

(관로설치 46.9km 중 5.6km 완료)

▶ 상수도공사 병행시행 구간 : 주천 용궁, 신촌동 우선 추진중

▶ 도시재생사업 병행시행 구간 : 향교동 구암마을 우선 추진중

□ 금후계획

◦ 전체사업 완료	: 2021. 12월 까지

마을하수도 설치사업

◦ 낙후된 농촌지역 주거환경개선 및 주민 하수도 복지를 위하여 분류식 오수관로 및 배수설비 설치

◦ 기존 처리장(용전)의 효율저하 및 용량부족에 따라 처리장 신, 증설

□ 개    요

사 업 명	사업기간	총사업비	사업량
계		12,111백만원 (국 8,477 시 3,634)	하수관로 L=15.7km 처리시설 2개소
용전지구 마을하수도 설치사업	2018 ~ 2020	8,802백만원 (국 6,161 시 2,641)	하수관로 L=11.4km 처리시설 Q=200㎥/일
서도지구 마을하수도 설치사업	2018 ~ 2020	3,309백만원 (국 2,316 시 993)	하수관로 L=4.3km 처리시설 Q=100㎥/일

□ 추진실적

<용전지구>

◦ 기본 및 실시설계용역 시행                    : 2018. 05.

◦ 관로공사 착공(공정율 : 85%)                   : 2018. 06. ~

◦ 처리장공사 착공(공정율 : 45%)                 : 2019. 11. ~

<서도지구>

◦ 기본 및 실시설계용역 시행                    : 2018. 12.

◦ 관로공사 착공(공정율 : 80%)                   : 2019. 03. ~

◦ 처리장공사 착공(공정율 : 40%)                 : 2019. 11. ~

□ 금후계획

◦ 전체사업 완료	: 2020. 12월 까지

남원공공하수처리시설 개선 및 운영관리

◦ 하수·분뇨 및 음식물류 폐기물 병합처리로 노후시설 개선을 통해 깨끗한 환경제공 및 방류수질 법적기준 준수

◦ 위생적이고 안정적인 수질관리로 하천수질오염 방지에 기여 하고자 함

□ 개    요

◦ 시 설 명 : 남원공공하수처리시설

◦ 시설용량 : 50,000톤/일(※처리공법 : Symbio)

◦ 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 12.(연중)

◦ 총사업비 : 896백만원

◦ 사업내용 : 남원공공하수처리시설 운영을 위한 시설 개선

□ 추진실적

◦ 시설운영관리

- 하수처리량 : 평균 39,350㎥/일(총 8,971,825㎥처리 / 2020.08.15.기준)

- 수 질 관 리 : 방류수 수질기준이하 관리

※ BOD 1.9㎎/L(기준 5㎎/L), COD 7.9㎎/L(20㎎/L), SS 3.5㎎/L(10㎎/L),

T-N 11.840㎎/L(20㎎/L), T-P 0.064㎎/L(0.3㎎/L)

◦ 시설개선사항 : 총 6건 808백만원 집행(2020.01. ~ 07.)

- 원심탈수기 설치공사(1대 / 430백만원)

- 노후 제어반(초침, 비상발전기) 교체(2면 / 55백만원)

- 음식물 협잡물이송장치 설치공사(1식 / 88백만원)

- 현장 제어반(유입동 등 5면) 교체(6면 / 109백만원)

- 계측제어(유량계 등 6식) 교체(7식 / 91백만원)

- 원심농축기 수선정비(보수) 공사(2대 / 35백만원)

□ 금후계획

◦ 수질관리 : 1회/일 이상 유입수 및 방류수 수질측정 및 시설물 운영       - 각 운영시설별 운영데이터 분석 및 실험을 통한 운영 관리

◦ 분뇨처리장 반응조 운영방법 개선 → 활용 극대화 추진

◦ 음식물·분뇨 처리시설 및 매립장 침출수 등의 연계처리량 증가에 따른 총질소(T-N) 저감방안 추진

요천 생태습지공원 관리

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 12.

◦ 총사업비 : 287백만원

◦ 사업내용 : 수목식재 및 모정설치 등 방문객 친화형 공원 운영

□ 추진실적

◦ 생태습지공원 사후 모니터링 용역(10백만원)	: 2020. 01. ~

◦ 쉼터조성 및 식재공사 실시설계용역(10백만원)	: 2020. 03.

◦ 애견놀이터 운영시간 연장	: 2020. 03. ~

※ 3월~10월 기간제 추가채용 및 연장운영(06:00 ~ 21:00)

◦ 야구장 바닥 흙 보충공사(10백만원)	: 2020. 04.

◦ 수목 식재공사(82백만원)	: 2020. 04.

- 고사목 제거 및 백합나무 60주 식재

◦ 쉼터 조성공사(25백만원)	: 2020. 04.

- 모정 2개소 및 그네벤치 2개소 설치

◦ 회랑설치 및 다래덩쿨 식재(55백만원)	: 2020. 07.

- 회랑10조, 다래덩쿨120주 등 초화류 식재

□ 금후계획

◦ 애견놀이터 대형파라솔 설치(4백만원)	: 2020. 09.

◦ 태양광가로등 보수(10백만원)	: 2020. 09.

운봉·인월 및 소규모 하수처리시설 관리대행

□ 개    요

◦ 대    상 : 공공하수도시설 114개소

- 공공하수처리장(500㎥이상) : 2개소

- 소규모 공공하수처리장(500㎥이하) : 61개소

- 중계펌프장 : 51개소

◦ 운 영 사 : (유)일토씨엔엠, (주)티에스케이워터

◦ 기    간 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.(총 계약기간 :2020.1.1.~2022.12.31.)

◦ 계약금액 : 1,629,600천원(인건비 663,082 / 변동비 554,600 / 부대비 411,918)

◦ 관리대행 업무내용

- 공공하수도 시설(기계, 전기, 자동제어 등)의 운전 및 유지관리

- 하수도법에 의한 방류수 수질기준 준수 및 수질자동측정기(TMS) 운영관리 등

□ 추진실적(1~7월)

◦ 관리대행비 금868,532천원 지급(인건비 386,798 / 변동비 257,906 / 부대비 223,828)

◦ 하수처리시설 탈수설비 교체(운봉), 수중펌프 교체 및 수리, 인버터 교체 등 169건

◦ 중계펌프장 수중모터펌프 보수 및 교체 등 65건

◦ 수질관리 현황(상반기 평균)

구 분		유 입 수 질(㎎/ℓ)					방 류 수 질(㎎/ℓ)
		BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD/기준	COD/기준	SS/기준	T-N/기준	T-P/기준
운봉 처리장		91.8	94.0	120.1	38.768	5.467	3.3 / 5	6.5 / 20	4.2 / 10	8.749 / 20	0.082 / 0.3
인월 처리장		94.0	95.7	121.8	41.215	5.350	3.1 / 5	6.0 / 20	3.7 / 10	7.192 / 20	0.085 / 0.3
낙동강 처리장	50㎥이상	91.8	94.0	120.1	38.768	5.467	3.3 / 10	6.5 / 40	4.2 / 10	8.749 / 20	0.082 / 2
	50㎥미만	94.0	95.7	121.8	41.215	5.350	3.0 / 10	6.0 / 40	3.7 / 10	7.192 / 40	0.085 / 4
섬진강 처리장	50㎥이상	58.6	43.8	74.5	29.424	3.891	6.6 / 10	9.4 / 40	6.0 / 10	11.260 / 20	1.090 / 2
	50㎥미만	58.8	40.9	74.0	28.218	4.149	6.8 / 10	11.3 / 40	6.6 / 10	11.296 / 40	1.166 / 4

□ 금후계획

◦ 처리장 및 중계펌프장 시설물 일상 및 정기점검으로 최상의 운영상태 유지

◦ 경미한 고장 시 직접 수리하여 예산 절감하고, 방류수 수질기준 준수

◦ 관리대행 성과평가 실시(1년마다)	: 2020. 12.

- 운영요원 근무년수, 방류수 수질기준 준수, 재해발생 빈도 등 평가

- 평가결과는 향후 관리대행업자 선정시 가․감점(±1점) 부여 등 반영

소규모 마을하수처리시설 개량사업

1. 양평 소규모 마을하수처리시설 개량사업

□ 사업개요

◦ 소 재 지 : 송동면 양평리 798-6 (처리구역 : 양평, 연산, 손동)

◦ 사 업 비 : 931백만원(국 279, 시 652)

◦ 사업기간 : 2018 ~	2020(처리용량 50㎥/일)

□ 추진실적 및 금후계획

◦ 토목,기계,전기 공사 추진(95%)	: 2019. 12. ~

◦ 공사 준공	: 2020. 10. 21.

2. 방촌 소규모 마을하수처리시설 개량사업

□ 사업개요

◦ 소 재 지 : 금지면 방촌리 1272-1 (처리구역 : 방촌)

◦ 사 업 비 : 740백만원(국 114, 시 626)

◦ 사업기간 : 2019 ~	2021(처리용량 50㎥/일)

□ 추진실적 및 금후계획

◦ 기본 및 실시설계 착수	: 2019. 02. 18.

◦ 공공하수도 설치사업 인가(변경) 신청(전라북도)	: 2020. 08. 14.

◦ 원가심사(전라북도)	: 2020. 10.

◦ 공사착공	: 2020. 11.

3. 비전 소규모 마을하수처리시설 개량사업

□ 사업개요

◦ 소 재 지 : 운봉읍 화수리 213-1 [처리구역 : 비전, 전촌, 화신, 군화동]

◦ 사 업 비 : 600백만원(국 76, 시 524)

◦ 사업기간 : 2020 ~	2021(처리용량 30㎥/일 ⇒ 60㎥/일)

□ 추진실적 및 금후계획

◦ 기본 및 실시설계 착수	: 2020. 04. 29.

◦ 하수도정비 기본계획 부분변경 신청(환경청)	: 2020. 05. 18.

◦ 공법선정	: 2020. 11.

◦ 변경인가 / 원가심사 신청(전라북도)	: 2021. 01. / 2021. 02.

◦ 공사착공	: 2021. 03.