2021년도 국가예산확보 추진실적

환경사업소

□ 사업현황(총괄)

(단위 : 억원)

구 분	건수	총 사 업 비					국 비 요구액	부 처 반영액	기재부 반영액
		계	국비	도비	시비	기타
총 계	8	1,538.70	1,016.90	0.00	521.80	0.00	365.40	365.40	268.30
국가사업
국고보조	8	1,538.70	1,016.90	0.00	521.80	0.00	365.40	365.40	268.30
기 금
균 특
특 교 세

구 분	건수	총 사 업 비					국 비 요구액	부 처 반영액	기재부 반영액
		계	국비	도비	시비	기타
총 계	8	1,538.70	1,016.90	0.00	521.80	0.00	365.40	365.40	268.30
계속사업	3	1,067.30	689.90	0.00	377.40	0.00	256.90	256.90	256.90
신규사업	5	471.40	327.00	0.00	144.40	0.00	108.50	108.50	11.40
공모사업

남원(2단계)하수관로 정비사업

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦「강우시 하수관리 시범사업(환경부)」으로 추진 중인 사업으로        남원처리구역 내의 합류식 관로지역을 분류식으로 전환

◦ 강우시 불명수 유입에 따른 하수처리장 운영효율 저하로 조속한 개선필요

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 일원 (6개 처리분구)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021 (4개년)

◦ 사 업 량 : 하수관로 L=54km, 배수설비 3,620여 가구

◦ 총사업비 : 312.2억원(국비 218.2, 시비 94)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2020	2021	2022이후
계	312.20	220.60	8.50	83.10
국 비	218.20	154.40	5.90	57.90
도 비
시 비	94.00	66.20	2.60	25.20
기 타

‘21 국비 요구액 : 57.90	부처 반영액 : 57.90	기재부 반영액 : 57.90

□ 추진상황

◦ 환경부 시범사업 선정                            : 2015. 02.

◦ 한국환경공단 위·수탁 협약체결                  : 2015. 03.

◦ 실시설계용역 완료                               : 2018. 08.

◦ 공사착공 (추진공정율-73%)                       : 2018. 10.

(배수설비 3,620가구 중 2,649가구 완료)

□ 금후계획

◦ 전체사업 완료                                  : 2021. 12월 까지

- 죽항동, 금동, 조산동 일부 미완료지역 사업 추진

남원(3단계)하수관로 정비사업

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦ 남원처리구역 내의 합류식 관로지역을 분류식으로 전환

◦ 강우시 불명수 유입에 따른 하수처리장 운영효율 저하로 조속한 개선필요

◦ 개인정화조 폐쇄에 따른 악취개선 및 주민 하수도복지에 기여

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 일원 (향교, 왕정, 신정, 신촌, 노암, 주천, 이백면 등)

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2021 (3개년)

◦ 사업내용

- 남원처리구역 : 하수관로 L=31.7km, 배수설비 1,760 가구

- 운봉처리구역 : 오수관로 설치 및 개량 L=15.2km

◦ 총사업비 : 378.2억원(국비 221.3, 시비 156.9)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2020	2021	2022이후
계	378.20	36.30	31.60	310.30
국 비	221.30	25.40	22.10	173.80
도 비
시 비	156.90	10.90	9.50	136.50
기 타

‘21 국비 요구액 : 173.80	부처 반영액 : 173.80	기재부 반영액 : 173.80

□ 추진상황

◦ 기본 및 실시설계용역 완료                      : 2018. 12.

◦ 전라북도 건설기술심의 완료                     : 2019. 08.

◦ 계약심의 완료                                  : 2019. 10.

◦ 공사착공 (추진공정율-15%)                      : 2020. 02.

(관로설치 46.9km 중 5.6km 완료)

□ 금후계획

◦ 전체사업 완료                                 : 2021. 12월 까지

남원 차집관로 정비사업

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦「강우시 하수관리 시범사업(환경부)」으로 추진 중인 사업으로        남원처리구역 내의 합류식 관로지역을 분류식으로 전환

◦ 강우시 불명수 유입에 따른 하수처리장 운영효율 저하로 조속한 개선필요

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 일원 (요천 외 7개 하천)

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2021 (6개년)

◦ 사 업 량 : 차집관로 L=31km

◦ 총사업비 : 376.9억원(국비 250.4, 시비 126.5)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2020	2021	2022이후
계	376.90	319.10	2.60	55.20
국 비	250.40	223.40	1.80	25.20
도 비
시 비	126.50	95.70	0.80	30.00
기 타

‘21 국비 요구액 : 25.20	부처 반영액 : 25.20	기재부 반영액 : 25.20

□ 추진상황

◦ 환경부 시범사업 선정                            : 2015. 02.

◦ 한국환경공단 위·수탁 협약체결                  : 2015. 03.

◦ 실시설계용역 완료                               : 2018. 08.

◦ 공사착공 (추진공정율-49%)                       : 2018. 10.

□ 금후계획

◦ 공사추진                                        : 2021. 6월 까지

남원처리구역 하수관로 확장사업

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦ 남원 주생 본 처리장 주변에 위치해 있지만 관로가 미 연결된 지역에 대한 사업필요성 대두

◦ 강우시 불명수 유입에 따른 하수처리장 운영효율 저하로 조속한 개선필요

◦ 개인정화조 폐쇄에 따른 악취개선 및 주민 하수도복지에 기여

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 일원 (9개 마을)

- 신정동, 화정동, 한우물, 주생면(부동,상동,중동,소지,대지), 산동면(목동)

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2024 (4개년)

◦ 사 업 량 : 하수관로 L=16.2km, 배수설비 730여 가구

◦ 총사업비 : 172.7억원(국비 120.9, 시비 51.8)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2020	2021	2022이후
계	172.70			42.80	129.90
국 비	120.90			30.00	90.90
도 비
시 비	51.80			12.80	39.00
기 타

‘21 국비 요구액 : 30.00	부처 반영액 : 30.00	기재부 반영액 : 3.00

□ 추진상황

◦ 실시설계용역 시행                                   : 2020. 02.

◦ 2021년 신규사업 신청(환경부)                         : 2020. 03.

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 완료                                   : 2020. 10.

◦ 재원협의 및 행정절차 이행                           : 2020. 12.

◦ 공사발주 및 착공                                    : 2021. 02.

◦ 사업완료                                            : 2024. 11.

아영 인풍지구 하수관로 정비사업

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦ 신규처리장 설치는 지양하고 관로확대 사업을 우선 지원하는 환경부 방침에 따라 기존 소규모 처리장은 폐쇄하고 관로연결을 통한 연계처리 지구

◦ 강우시 불명수 유입에 따른 하수처리장 운영효율 저하로 조속한 개선필요

◦ 개인정화조 폐쇄에 따른 악취개선 및 주민 하수도복지에 기여

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 아영면, 인월면 일원 (12개 마을)

- 인월면(내건,외건,지산,연실,자래,덕실), 아영면(봉대,외인,내인,동갈,서갈,매산)

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2024 (4개년)

◦ 사 업 량 : 하수관로 L=15.4km, 배수설비 450여 가구

◦ 총사업비 : 160억원(국비 112, 시비 48)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2020	2021	2022이후
계	160.00			42.80	117.20
국 비	112.00			30.00	82.00
도 비
시 비	48.00			12.80	35.20
기 타

‘21 국비 요구액 : 30.00	부처 반영액 : 30.00	기재부 반영액 : 3.00

□ 추진상황

◦ 실시설계용역 시행                                   : 2020. 02.

◦ 2021년 신규사업 신청(환경부)                         : 2020. 03.

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 완료                                   : 2020. 10.

◦ 재원협의 및 행정절차 이행                           : 2020. 12.

◦ 공사발주 및 착공                                    : 2021. 02.

◦ 사업완료                                            : 2024. 11.

산내지구 하수관로 정비사업

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦ 강우시 불명수 유입에 따른 하수처리장 운영효율 저하로 조속한 개선필요

◦ 개인정화조 폐쇄에 따른 악취개선 및 주민 하수도복지에 기여

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산내면 일원 (5개 마을)

- 산내면(상황, 중황, 하황, 중기, 삼화)

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2022 (2개년)

◦ 사 업 량 : 하수관로 L=6.6km, 배수설비 280여 가구

◦ 총사업비 : 65억원(국비 45.5, 시비 19.5)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2020	2021	2022이후
계	65.00			7.10	57.90
국 비	45.50			5.00	40.50
도 비
시 비	19.50			2.10	17.40
기 타

‘21 국비 요구액 : 5.00	부처 반영액 : 5.00	기재부 반영액 : 3.00

□ 추진상황

◦ 실시설계용역 시행                                   : 2020. 02.

◦ 2021년 신규사업 신청(환경부)                         : 2020. 03.

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 완료                                   : 2020. 10.

◦ 재원협의 및 행정절차 이행                           : 2020. 12.

◦ 공사발주 및 착공                                    : 2021. 02.

◦ 사업완료                                            : 2022. 11.

남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦ 2021년 완공예정인 남원일반산업단지 내 폐수종말처리장과 연계하여 주변마을의 하수처리 병행 필요

◦ 개인정화조 폐쇄에 따른 악취개선 및 주민 하수도복지에 기여

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 사매면 일원 (4개 마을)

- 사매면(덕평, 수월, 손율, 인화)

◦ 사업기간 : 2021. 01 ~ 12.

◦ 사 업 량 : 하수관로 L=6.4km, 배수설비 150여 가구

◦ 총사업비 : 58.7억원(국비 41.1, 시비 17.6)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2020	2021	2022이후
계	58.70			58.70
국 비	41.10			41.10
도 비
시 비	17.60			17.60
기 타

‘21 국비 요구액 : 41.10	부처 반영액 : 41.10	기재부 반영액 : -

□ 추진상황

◦ 실시설계용역 시행                                   : 2020. 02.

◦ 2021년 신규사업 신청(환경부)                         : 2020. 03.

□ 금후계획

◦ 2022년도 신규사업 재신청 추진                       : 2020. 12.

남원 노후 하수관로 정비 정밀조사

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦ 노후 하수관로 정밀진단(2016.04) 결과에 따른 정비로 도로함몰 등 안전사고에 선제적 대응

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 일원

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2022 (2개년)

◦ 사 업 량 : 노후 하수관로 정밀조사 L=208km

◦ 총사업비 : 15억원(국비 7.5, 시비 7.5)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2020	2021	2022이후
계	15.00			4.80	10.20
국 비	7.50			2.40	5.10
도 비
시 비	7.50			2.40	5.10
기 타

‘21 국비 요구액 : 2.40	부처 반영액 : 2.40	기재부 반영액 : 2.40

□ 추진상황

◦ 실시설계용역 시행                                   : 2020. 02.

◦ 2021년 신규사업 신청(환경부)                         : 2020. 03.

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 완료                                   : 2020. 10.

◦ 재원협의 및 행정절차 이행                           : 2020. 12.

◦ 용역발주 및 착수                                    : 2021. 02.

◦ 조사완료                                            : 2022. 12.