2021년도 국가예산확보 추진실적

교육체육과

□ 사업현황(총괄)

(단위 : 억원)

구 분	건수	총 사 업 비					국 비 요구액	부 처 반영액	기재부 반영액
		계	국비	도비	시비	기타
총 계	3	207.76	93.55	1.35	76.50	36.36	25.00	25.00	25.00
국가사업
국고보조
기 금	2	177.76	81.55	1.35	58.5	36.36	19	19	19
균 특	1	30	12		18		6	6	6
특 교 세

구 분	건수	총 사 업 비					국 비 요구액	부 처 반영액	기재부 반영액
		계	국비	도비	시비	기타
총 계	3	207.76	93.55	1.35	67.00	36.36	25.00	25.00	25.00
계속사업	3	207.76	93.55	1.35	67	36.36	25	25	25
신규사업
공모사업

남원거점 스포츠클럽 운영지원

【기금, 계속】

□ 필 요 성

◦ 지역스포츠 인재 양성 등을 목적으로 설립된 (사)남원거점스포츠클럽에 대한 당초 지원기간(2017~2019년) 종료 후 스포츠클럽 자립운영을 위한 지속적인 국비지원 필요

◦ 엘리트체육 기초인재 양성을 통한 체육엘리트 인재풀 다양화 및 지역인재 양성으로 스포츠 균형발전 도모

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 이백면 이백로 333

◦ 사업기간 : 2020년 이후

◦ 사업규모 : 엘리트 4종목 육성(축구, 탁구, 테니스, 복싱)

◦ 총사업비 : 5.25억원(국비 3, 도비 0.25, 시비 2)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2020	2021	2022이후
계	79.76	36.25	13.75	14.88	14.88
국 비	32.55	24	2.55	3	3
도 비	1.35	0.6	0.25	0.25	0.25
시 비	9.50	3.5	2	2	2
기 타	36.36	8.15	8.95	9.63	9.63

□ 추진상황

◦ 선수 저변확대 인센티브 사업 추진 예정 : 대한체육회

- 스포츠클럽 성과에 따라 종목당 50~80백만원 차등지급

◦ 별도 국비사업 추진(스포츠클럽 리그운영, 신나는 주말체육학교사업 등)

□ 금후계획

◦ 우수한 성과를 거둘 수 있도록 거점스포츠클럽의 노력 및 지원 춘향골체육공원 배드민턴장 조성사업

【균특, 계속】

□ 개    요

◦ 위    치 : 충정로 341(춘향골체육공원)

◦ 사업기간 : 2019. 11. ~ 2021. 12.

◦ 사 업 량 : 실내 배드민턴장(8면), 사무실 등 부대시설

◦ 총사업비 : 30억원(균특 12, 시비 18)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2020	2021	2022이후
계	30	1.00	14.00	15.00	0.00
국 비	12.00		6	6
도 비	0.00
시 비	18.00	1	8	9
기 타	0.00

‘21 국비 요구액 : 6억	부처 반영액 : 6억	기재부 반영액 : 6억

□ 추진실적

◦ 재정투자심사 등 사전절차 이행	: 2019. 1. ~ 2.

◦ 2020년 균형발전 특별회계 사업신청 및 선정 : 2019. 3. ~ 8.

◦ 기본 및 실시설계용역	: 2019. 11. ~ 2020. 7.

◦ 도 원가심사 및 시 일상감사	: 2020. 8. ~ 9.

□ 금후계획

◦ 남원 배드민턴장 건립사업 시행	: 2020. 9. ~ 2021. 10.

◦ 시운전 및 개관	: 2021. 11. ~ 2021. 12.

※ 국비2년간 계속 지원으로 사업 정상 추진에 따른 21년분 확보

지리산권 생활SOC복합화 공간 조성사업

【기금·균특, 계속】

□ 개    요

◦ 위    치 : 인월면 서무리 628-2 일원

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

◦ 사 업 량 : 복합문화센터 연면적 3,000㎡ 내외(지하1층 ~ 지상2층)

◦ 총사업비 : 98억원(기금 40, 균특 9, 시비 49)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2020	2021	2022이후
계	98.00	0.00	32.00	32.00	34.00
국 비	49.00		16	16	17
도 비	0.00
시 비	49.00		16	16	17
기 타	0.00

‘21 국비 요구액 : 16억	부처 반영액 : 16억	기재부 반영액 : 16억

□ 추진실적

◦ 지리산권 생활SOC 복합화 공간 공모선정   : 2019. 10. 2.

◦ 재정투자심사 등 사전절차 이행	: 2019. 10.

◦ 공공건축 사업계획 사전검토	: 2020. 5. ~ 6.

◦ 건축설계 제안공모 추진 및 업체 선정	: 2020. 7. ~ 10.

□ 금후계획

◦ 기본 및 실시설계용역 시행	: 2020. 10. ~ 2021. 5.

◦ 생활SOC 복합화공간사업 시행 및 완료	: 2021. 6. ~ 2022. 10.

◦ 시운전 및 개관                           : 2022. 11. ~ 2022. 12.

※ 국비 3년간 지원으로 사업 정상 추진에 따른 연차별 확보