2021년도 신규사업 발굴 내역

관 광 과

□ 신규사업 발굴 목록

(단위 : 백만원)

연번	시책 구분	사 업 명	사업 기간	총 사업비	2021년 사업비					비고
					계	국비	도비	시비	기타
		계		23,000	3,200	1,600	800	800	0
1	문화관광	오리정·버선밭 연계 관광지화 사업	21~25	7,000	1,200	600	300	300
2	문화관광	교룡산 국민관광지 활성화 사업	21~25	8,000	1,600	800	400	400
3	문화관광	이성계 장군 전승지 주변 개발 사업	21~25	8,000	400	200	100	100

구 분	문화관광	보조사업	관광과 관광개발담당
오리정․버선밭 연계 관광지화 사업

□ 필 요 성

◦ 오리정 및 버선밭은 전주에서 남원으로 들어오는 초입부에 위치하고 있어 관광객들이 쉽게 찾을 수 있는 곳이나, 국도 17호선 아래 위치하여 눈에 띄지 않아 관광객들이 많이 찾지 못하는 실정임

⇨ 오리정과 버선밭 주변에 상징물 설치와 테마공원 조성 등을 통해

광한루원과 함께 춘향전 관련 관광지로 조성

□ 사업개요 및 주요내용

◦ 사업지역 : 사매면 월평리 27-1번지 일원

◦ 사업기간 : 2021~ 2025년

◦ 사 업 비 : 7,000백만원 (균이3,500, 도비1,750, 시비1,750)

◦ 사업내용 : 오리정 테마공원(눈물정원, 주차장) 조성, 버선밭 및 유휴공간 조성 등

□ 추진상황 및 계획

◦ 오리정·버선밭 연계 관광지화 기본계획 수립 추진	: ‘19. 11. ~ ‘20. 5.

◦ 주민설명회(2회)	: ‘20. 1. ~ 2.

◦ 재정투자심사(전라북도) 심사 완료	: ‘20. 7. 8.

◦ 실시설계용역 및 사업시행	: ‘21. 1. ~ ‘25. 12.

□ 소요재원 조성계획

(단위 : 백만원)

재원 구분	합계	기투자 (～‘20)	재원 투자계획					‘25년 이후	비고
			소계	‘21	‘22	‘23	‘24
합계	7,000	0	7,000	1,200	1,000	1,400	1,600	1,800
균이	3,500		3,500	600	500	700	800	900
도비	1,750		1,750	300	250	350	400	450
시비	1,750		1,750	300	250	350	400	450

□ 행정절차 이행사항

용역과제 심의	중기지방재정계획	지방재정투자심사	공유재산 심의
-	‘20.10. 예정	‘20.07.08.	-

구 분	문화관광	보조사업	관광과 관광개발담당
교룡산 국민관광지 활성화 사업

□ 필 요 성

◦ 교룡산은 다양한 역사문화 자원이 있음에도 불구하고 둘레길 산책로로만 활용되고 있음

⇨ 역사문화 관광 콘텐츠 보강을 통해 국민관광지로 활성화 모색

□ 사업개요 및 주요내용

◦ 사업지역 : 교룡산 국민관광지 일원

◦ 사업기간 : 2021~ 2025년

◦ 사 업 비 : 8,000백만원 (균이4,000, 도비2,000, 시비2,000)

◦ 사업내용

- 1단계(2021~2023년) : 동학정신의 길, 힐링․감성정원, 메모리얼 파크, 소리길

- 2단계(2024~2025년) : 생태예술정원, 아트힐링 캠프, 생태예술정원(2차)

※ 도시과 추진 : 산림욕장, 오토캠핑장 조성

□ 추진상황 및 계획

◦ 남원 관광종합개발계획 수립                       : ‘19. 12.

◦ 교룡산 국민관광지 기본계획 수립 용역 추진	: ‘20. 4. ~ 8.

◦ 재정투자심사(전라북도) 심사 완료                  : ‘20. 7. 8.

◦ 실시설계용역 및 사업시행                         : ‘21. 1. ~ ‘25. 12.

□ 소요재원 조성계획

(단위 : 백만원)

재원 구분	합계	기투자 (～‘20)	재원 투자계획					‘25년 이후	비고
			소계	‘21	‘22	‘23	‘24
합계	8,000	0	8,000	1,600	1,200	1,600	2,000	1,600
균이	4,000		4,000	800	600	800	1,000	800
도비	2,000		2,000	400	300	400	500	400
시비	2,000		2,000	400	300	400	500	400

□ 행정절차 이행사항

용역과제 심의	중기지방재정계획	지방재정투자심사	공유재산 심의
-	‘20.10. 예정	‘20.07.08.	‘20.09. 예정

구 분	문화관광	보조사업	관광과 관광개발담당
이성계 장군 전승지 주변 개발 사업

□ 필 요 성

◦ 피바위와 황산은 이성계 장군 전승지의 대표 관광자원이나 주변 자원들의 연계성 및 접근성이 미약하고 관광 집객시설 및 콘텐츠가 부족함

⇨ 황산대첩비지 등을 중심으로 다양한 콘텐츠를 개발하여 지리산권역 관광지로 조성

□ 사업개요 및 주요내용

◦ 사업지역 : 운봉읍 화수리 황산대첩비지 인근

◦ 사업기간 : 2021~ 2025년

◦ 사 업 비 : 8,000백만원 (균이4,000, 도비2,000, 시비2,000)

◦ 사업내용 : 충절공원 조성, 전시관 신축, 주차장 조성 등

□ 추진상황 및 계획

◦ 이성계 장군 전승지 주변개발 기본계획 수립 추진	: ‘17. 12. ~ ‘18. 9.

◦ 남원 관광종합개발계획 수립	: ‘19. 12.

◦ 재정투자심사(전라북도) 심사 완료	: ‘20. 7. 8.

◦ 기본 및 실시설계용역 시행	: ‘21. 1. ~ 6.

◦ 토지 매입 및 사업 시행	: ‘21. 1. ~ ‘25. 12.

□ 소요재원 조성계획

(단위 : 백만원)

재원 구분	합계	기투자 (～‘20)	재원 투자계획					‘25년 이후	비고
			소계	‘21	‘22	‘23	‘24
합계	8,000	0	8,000	400	800	800	2,800	3,200
균이	4,000		4,000	200	400	400	1,400	1,600
도비	2,000		2,000	100	200	200	700	800
시비	2,000		2,000	100	200	200	700	800

□ 행정절차 이행사항

용역과제 심의	중기지방재정계획	지방재정투자심사	공유재산 심의
-	‘20.10. 예정	‘20.07.08.	‘20.09. 예정