2021년도 신규사업 발굴 내역

도 시 과

□ 신규사업 발굴 목록

(단위:백만원)

연번	시책 구분	사 업 명	사업 기간	총 사업비	2021년 사업비					비고
					계	국비	도비	시비	기타
		계 (4건)		49,790	5,050			5,050
1	소통행정	서부권 남북 연결도로 개설사업	21 ~27	37,100	1,000			1,000	-
2	지역경제	청년 정주환경 조성사업	21 ~22	2,000	1,000			1,000	-
3	문화관광	관광인프라 구축을 위한 구도심 거점재생 사업	21 ~24	10,640	3,000			3,000	-
4	문화관광	왕정공원 등산로 정비사업	21	50	50			50

구 분	소통행정	자체사업	도시과 도시정비담당
서부권 남북 연결도로 개설사업

□ 필 요 성

◦ 우리시 도심지역의 주거․산업․ 생활 시설이 동․남측(도통, 월락, 노암)에 집중으로 도시발전 불균형 초래

◦ 상대적으로 개발이 둔화된 서부권(신정, 금동, 송동)지역 연결도로 확충으로 특화 산업 유통 판매시설 입지 등 지역경제 활성화 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요 및 주요내용

◦ 사업지역 : 남원시 신정동(남원역) ~ 송동면 장국리(지방도730호) 일원

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2027(7개년) / ◦ 사 업 비 : 37,100백만원 (시비 37,100)

◦ 사업내용 : 도로개설 L= 2.4km, B=25m, 교량 2개소 / 대로 3-7호선

	〈 현실태 및 현황 〉
□ 남원역 앞 도시개발사업지구 관광객 이용시설 부재로 관광 남원 이미지 저해 □ 서부권 남북 연결도로망 미비로 지역개발 지체 □ 금동지역은 성장관리방안 수립지역으로 체계적인 도시개발이 필요한 지역임

□ 추진계획

◦ 지방재정 투자심사 및 중기지방 재정계획 반영	: 2020. 10.

◦ 용지보상 추진	: 2021. 01. ~ 2023. 12.

◦ 실시설계용역 추진	: 2024. 01. ~ 2012.

◦ 공사 시행	: 2025. 01. ~ 2027. 12

□ 소요재원 조성계획

(단위 : 백만원)

재원 구분	합계	기투자 (～‘20)	재원 투자계획					‘25년 이후	비고
			소계	‘21	‘22	‘23	‘24
합계	37,100		6,000	1,000	2,000	2,000	1,000	31,100
국비
도비
시비	37,100		6,000	1,000	2,000	2,000	1,000	31,100

□ 행정절차 이행사항

용역과제 심의	중기지방재정계획	지방재정투자심사	공유재산 심의
x	‘20.11 (예정)	‘20.11 (예정)	x

구 분	지역경제	자체사업	도시과 도시재생담당
청년 정주환경 조성사업

□ 필 요 성

◦ 대학진학, 취업 등의 이유로 늘어나는 청년 외부유출에 대응하기 위하여 기 추진중인 청년 문화․창업공간 조성사업과 함께 살자리 제공을 통한 정주여건 개선으로 청년인구 유입 유도

□ 사업개요 및 주요내용

◦ 위    치 : 죽항동 일원 (남경탕, 구.친구한식, 구.주조장옆 공가)

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2022

◦ 사 업 비 : 2,000백만원 (시비)

◦ 사업내용 : 건축물 3개소 매입을 통한 임대주택 및 공공임대상가 조성

	〈 현실태 및 현황 〉
□ 지속되는 구도심 공동화로 인하여 빈 건축물이 증가하고 있으며, 정주인구 또한 감소하고 있음 □ 흑돼지먹자거리 일원 활성화를 위하여 청년 문화․창업공간 조성을 통한 설자리, 일자리, 놀자리를 조성하고 있으나 살자리(주거) 사업은 미추진 □ 동지역 중 죽항동 청년인구비율 최하위 수준

□ 추진계획

◦ 건축물 매입 및 리모델링 설계                     : 2021. 01. ~ 12.

◦ 리모델링 공사 추진 및 입주자 모집                : 2022. 01. ~ 12.

□ 소요재원 조성계획

(단위 : 백만원)

재원 구분	합계	기투자 (～‘20)	재원 투자계획					‘25년 이후	비고
			소계	‘21	‘22	‘23	‘24
합계	2,000	-	2,000	1,000	1,000	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	2,000	-	2,000	1,000	1,000	-	-	-

□ 행정절차 이행사항

용역과제 심의	중기지방재정계획	지방재정투자심사	공유재산 심의
x	‘20.11 (예정)	‘20.11 (예정)	‘20. 9 (예정)

구 분	문화관광	자체사업	도시과 도시재생담당
관광인프라 구축을 위한 구도심 거점재생 사업

□ 필 요 성

◦ 구도심 내 잠재력 있는 거점 유휴자원 재생을 통해 광한루원과 길문화관 및 만인공원을 연계하는 관광인프라 구축으로 구도심 활성화 제고

□ 사업개요 및 주요내용

◦ 사업지역 : 원도심 내 거점 5개소

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2024

◦ 사 업 비 : 10,640백만원 (시비) ※ 각종 공모사업을 통한 국비 확보 추진 노력

◦ 사업내용 : 주요거점 3개소(종가, 구.미도탕, 구.주조장) 매입을 통한 재생사업 추진

※ 주요거점 2개소(북부시장, 흑돼지먹자거리) 사업 추진 중

	〈 현실태 및 현황 〉
□ 지속되는 구도심 공동화에 대응하기 위하여 구도심 활성화를 위한 재생사업 추진 필요 □ 구도심 활성화를 위한 도시재생사업 및 청년 문화․창업공간 조성사업 추진 중 □ 구도심 거점 재생을 위한 유휴거점 기본구상용역 추진 완료

주조장

미도탕

종가

흑돼지거리

북부시장

□ 추진계획

◦ 사업대상지 매입 및 각종 공모사업 응모            : 2021. ~ 2022.

※ 공모사업 대응을 위한 사업대상지 선 매입 필요

◦ 주요거점 재생사업 추진                           : 2022. ~ 2024.

□ 소요재원 조성계획

(단위 : 백만원)

재원 구분	합계	기투자 (～‘20)	재원 투자계획					‘25년 이후	비고
			소계	‘21	‘22	‘23	‘24
합계	10,640	-	10,640	3,000	2,500	2,500	2,640	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	10,640	-	10,640	3,000	2,500	2,500	2,640	-

□ 행정절차 이행사항

용역과제 심의	중기지방재정계획	지방재정투자심사	공유재산 심의
x	‘20.11 (예정)	‘20.11 (예정)	‘20. 9 (예정)

구 분	문화관광	자체사업	도시과 공원담당
왕정공원 등산로 정비사업

□ 필 요 성

◦「왕정공원」내에 설치되어 있는 기린봉 등산로 위험구간 정비를 통해

양질의 산림휴양 활동 공간 및 휴식 공간 제공

□ 사업개요 및 주요내용

◦ 사업지역 : 남원시 왕정동 산곡동 64번지 (기린봉)

◦ 사업기간 : 2021년(1개년)

◦ 사 업 비 : 50백만원 (시비 50)

◦ 사업내용 : 왕정공원 등산로 정비(급경사지 계단 및 안내판 설치)

	〈 현실태 및 현황 〉
□ 기린봉 등산로 입구에 잡관목과 잡초가 무성하고 급경사지로 안전사고 우려 □ 안내판, 방향표지판, 등산로 정비 등 편익시설 미비 로 이용객 불편 초래

□ 추진계획

◦ 왕정공원 등산로 정비 실시설계용역	: 2021. 2 ~ 3.

◦ 왕정공원 등산로 정비 사업시행	: 2021. 4. ~ 6.

- 등산로안내판·방향표지판 설치

- 등산로 정비(급경사지 계단 등)

□ 소요재원 조성계획

(단위 : 백만원)

재원 구분	합계	기투자 (～‘20)	재원 투자계획					‘25년 이후	비고
			소계	‘21	‘22	‘23	‘24
합계	50		50	50
시비	50		50	50