2020. 9.

2020년 주요업무 추진실적

산 림 녹 지 과

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2020년 주 요 업 무  결산

□ 2020년 주요업무 추진실적

◦미세먼지 차단 숲 조성

◦함파우 지방정원 조성

◦복지시설 나눔숲 조성사업

◦조경수 관리 전담팀 운영

◦임도사업

◦숲길 조성사업

◦산불방지 대책

◦산림병해충방제

◦숲가꾸기 사업

◦도시숲 및 가로수 조성사업

◦요천변·향기원·신생마을 운영관리

◦산림소득증대사업

◦조림사업

◦일반농산어촌개발 (산림휴양치유마을) 사업

◦백두대간 생태교육장 운영 및 관리

일  반  현  황

□ 기    구

										산림녹지과장
										이 승 재
산림경영담당					산림보호담당						조경시설담당								산림소득담당						백두생태담당
안 성 순					서 상 훈						안 길 재								김 인 규						안 도 엽
임도개설 및 관리 숲길(등산로) 정비 임업후계자 선정·관리 공유재산관리 산지전용허가·협의 자연휴양림관리 국가산림문화자산 지정 ·관리 산사태취약지역지정·관리					산불방지대책추진 산림피해단속·사건처리 산림병해충방제 보호수지정·관리 토석채취허가·지도 숲가꾸기사업 추진						도시숲 조성·관리 가로수 조성·관리 가로화단 조성·관리 요천변 꽃단지 관리 향기원·신생마을꽃단지 조성·관리 양묘장 꽃생산·식재 유아숲체험원조성·관리 숲길(등산로) 정비								산림경영계획인가 조림사업추진 산림소득사업추진 백두대간주민지원 농림사업·농특회계 산촌생태마을관리 임도개설 및 관리						백두대간생태교육장 운영 및 관리 ∘전 시 관 ∘체험휴양시설 ∘생태관광에코롯지 ∘국민여가캠핑장 ∘고원선수촌훈련장 ∘물놀이장운영관리

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	21	1	5	4	7	4	18
현 원	21	1	6	8	5	1	18
증 감	-	-	1	4	△2	△3	-

□ 인    력

※ 비    고 : 18명(임기제 2, 청원경찰 6, 공무직 10)

※ 육아휴직 :  2명(녹지7급) 현원 포함

2020년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 도시숲·정원 등 생활밀착형 숲 확대(미세먼지 차단숲 1개소,지방정원 1개소) - 노암산업단지 미세먼지 차단숲 1㏊, 함파우 지방정원 10㏊ 사업착수 ◦산림육성 및 산지 재해예방 : 숲가꾸기, 임도사업 등 5개사업 9,881백만원 ◦산림휴양치유마을 사업추진(노치 완료, 달궁 추진중) 및 산림소득 신품종 재배지원(두릅, 산마늘) ◦산림서비스(유아숲 체험,산림치유 프로그램) 확대 및 산림시설 코로나 대응 철저로 산림복지 포용성 강화 구현

□ 관광지를 연계한 도시정원 조성 기반 마련

◦ 시민들에게 각광받는 도심속 쉼터공간 및 함파우 지방정원 조성

- 미세먼지 저감숲 조성(1㏊) : 소나무 외 22종 36,162주

- 도시숲(관문도로 외 2개소) 0.9ha, 가로수(금동로 외 5노선) 조성 6.7㎞

- 함파우 지방정원 기본 및 실시설계 추진(10ha)으로 관광자원 마련

□ 건강한 산림자원 육성과 산지관리 강화

◦ 소나무	재선충병 방제사업	: 50.98ha / 128백만원

◦  숲가꾸기 사업                              : 1,130㏊, 1,800백만원

◦ 경제림·미세먼지저감 등 조림사업               : 312㏊,  2,241백만원

◦ 임도신설, 구조개량                              : 9.5㎞, 1,363백만원

◦ 숲길정비                                  : 68㎞, 790백만원

◦ 산림 인허가(전용, 협의, 벌채, 임산물 굴취 등) 처리     : 787건

◦ 토석채취 허가 및 관리	: 31개소

□ 안전한 산림환경 조성을 위한 산림재해 예방

◦ 봄철 산불방지대책본부 운영(2. 1 ~ 5. 15)

- 감시원 및 진화대 배치(119명)                : 산불발생 13건, 0.80ha

※ `19년 : 20건/ 4.31ha, `18년 : 17건/ 1.08ha, `17년 : 14건/ 1.13ha

◦ 사방댐 등 사방사업                            : 14개소, 3,687백만원

◦ 생활권재해우려목 제거사업                 : 269본

◦ 산림병해충 예찰 및 방제                  : 방제단 3명, 연중

- 소나무재선충병 검경 의뢰(산림환경연구소) : 599본(소나무고사목)

□ 마을가꾸기 및 산림소득 증대지원

◦ 산림휴양치유 마을 조성 : 주천 노치마을 준공(4월), 산내 달궁마을 추진중

◦ 임산물 생산기반, 친환경임산물재배, 생산단지 조성 : 70개소, 823백만원

◦ 임산물상품화, 유통기반조성 : 39개소, 227백만원

◦ 백두대간 주민소득 : 저온저장고, 정제기, 건조기, 창고 등 37개소, 189백만원

◦ 산림소득작물 재배지원 : 두릅, 산마늘 36개소, 83백만원

2020년 주요업무 추진실적

미세먼지 차단 숲 조성

□ 개    요

◦ 위    치 : 노암산업단지

◦ 사업규모 : 1.0ha

◦ 사 업 비 : 1,000백만원(국비 500 시비 500)

◦ 도급업체 : 남원산림조합(조합장 윤영창)

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12월

◦ 사업내용 : 미세먼지 저감숲, 차단숲, 바람숲길 조성(소나무 외 22종 36,162주)

- 미세먼지 저감숲 : 소나무 외 6종 422주 식재

- 미세먼지 차단숲 : 스트로브잣나무 외 6종 10,495주 식재

- 바람숲길 : 왕벚나무 외 8종 25,245주 식재

- 쉼터조성 : 파고라 1개, 등의자 11개, 야자매트 230m, 판석 100㎡

□ 추진실적

◦ 사업계획 수립                                   : 2020. 2. 4.

◦ 미세먼지 저감숲 실시설계 용역 실시              : 2020. 2. 10. ~ 4. 4.

◦ 도시림 등의 조성․관리 심의위원회, 원가심사       :  2020. 3. 31. ~ 5. 15.

◦ 미세먼지 저감숲 조성사업 시행                    : 2020. 6. 3. ~ 8. 1.

◦ 공사 중지                                        : 2020. 6. 10

□ 금후계획

◦ 미세먼지 저감숲 조성사업 재착공                  : 2020. 9. ~ 12월

◦ 급수, 시비, 제초 등 사후관리 철저                 : 계속

함파우 지방정원 조성

□ 개    요

◦ 위    치 : 노암동 산13 외 83필지

◦ 사업규모 : 10ha

◦ 총사업비 : 6,000백만원(도비 3,000 시비 3,000)

◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)

◦ 사업내용 : 주제정원, 산책로, 전망대, 편의시설, 주차장 등

- 연차별 사업추진 및 투자계획

(단위 : 억)

구 분	계	2020년	2021년	2022년	2023년	비 고
계	60	5	20	20	15
기본 및 실시설계 용역	5	5				조달청 PQ의뢰
기반시설 및 토목공사	15		15
토목, 조경, 전기공사	40		5	20	15

□ 추진실적

◦ 사업계획 수립                                   : 2020. 2. 4.

◦ 기본 및 실시설계용역 실시                       : 2020. 5. 13.

- 용역발주(조달청 PQ 의뢰)

※ 개찰결과 : 2020. 8. 12. ㈜케이지엔지니어링 대표 천병희

□ 주요쟁점 및 애로사항

◦ 사업대상지 인접지에 조성 중인 옛다솜 이야기원, 관광단지 테마 등 주변관광 인프라와 연계한 지방정원조성 필요

□ 대규모 4계절 꽃단지 테마를 주제로 방향 설정

□ 금후계획

◦ 기본 및 실시설계용역 실시                    : 2020. 8월 ~ (5개월)

◦ 전략환경영향평가, 문화재지표조사 시행         : 2020. 9월 ~

복지시설 나눔숲 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 이백면 한울학교

◦ 사업규모 : 1,100㎡

◦ 사 업 비 : 125백만원(도비 125)

◦ 도급업체 : 유한회사 석봉조경(대표 조순녀)

◦ 사업기간 : 2020. 4. 6 ~ 6. 16

◦ 사업내용 : 수목식재 외 3종

- 식재공(왕벚나무 외 8종 2,357주, 꽃잔디 240본, 잔디 520㎡), 토공 1식, 포장공 1식, 부대공 1식

□ 추진실적

◦ 사업계획 수립                                   : 2020. 2. 4.

◦ 현지조사 및 실시설계 용역 실시                  : 2020. 2. 19. ~ 3. 13.

- 한울학교, 전문가 자문단 의견수렴

◦ 복지시설 나눔숲 사업완료                        : 2020. 4.  6. ~ 6. 16.

□ 금후계획

◦ 급수, 시비, 제초 등 사후관리 철저(한울학교)       : 계속

조경수 관리 전담팀 운영

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 일원

◦ 사역인원 : 4명

◦ 사 업 비 : 123백만원(시비 123)

◦ 사업기간 : 2020. 3. ~ 11월

◦ 사업내용 : 조경수 및 관목류 전정, 가로수 가지치기 등 수목관리

□ 추진실적

◦ 조경수 관리 전담인력 활용계획 수립               : 2019. 8. 28.

◦ 조경수 관리 전담인력 인부 선발                   : 2020. 2. 27.

◦ 조경수 관리 전담인력 인부 사역 및 사업추진       : 2020. 3 ~ 7월

- 세부사업 추진내역

노선별	길 이	수 종	본 수	작업내용	비 고
계	8.8km	배롱나무 외 10종	43,944주
만인로	1.7km	배롱나무 외 1종	286주	전정, 고사지 제거
광천남로	1.0km	배롱나무 외 3종	270주	전정, 고사지 제거	배롱, 산수유, 철쭉, 무궁화
요천로	4.9km	소나무 외 2종	57주	전정, 고사목 제거, 수관조절	소, 배롱, 스트로브잣
		철쭉	43,200주	수형조절 전정
오들로	1.0km	소나무 외 2종	57주	전정(보행방해)	소, 살구, 느티
덕과 3.1기념탑	0.2km	반송 외 3종	74주	전정, 고사지 제거	반송, 명자, 무궁화
대산면 마을숲 (금성리·왈길)		소나무	28주	전정, 고사지 제거
운봉읍 삼산마을		소나무	161주	전정, 고사지 제거
백두대간 생태교육장 · 유아숲 체험원		소나무 외 7종	272주	전정, 고사지 제거	소, 단풍, 살구, 이팝, 왕벚, 무궁화, 배롱, 느티

□ 금후계획

◦ 조경수 관리 전담인력 인부 사역 및 사업추진      : 2020. 8 ~ 11월

- 시내권 녹지대 및 가로수 전정작업 실시 등

임도사업

□ 개    요

◦ 위치/사업량 : 관내임도일원/49.5㎞

◦ 사 업 비 : 1,363백만원(균특 468, 도비 450 시비 445)

◦ 사업기간 : 2020. 2. ~ 12월

◦ 사업내용 : 간선 3.0㎞(균특), 간선 1.5㎞(도비), 구조개량 5㎞, 보수 8㎞, 지장목제거 30㎞, 임도관리원 2명

※ 기존임도(1985 ~ 2019) : 35개 노선 119.769㎞

□ 추진실적

◦ 간선임도 실시설계용역(산동 대상, 보절 서치지구)  : 2020. 04. ~ 05.

◦ 간선임도신설사업(산동대상) 사업 착수

- 사업기간 : 2020. 06. 23 ~ 2021. 01. 25.

- 사 업 비 : 621,626천원(도급 554,000  관급 67,626)

◦ 간선임도신설사업(보절서치) 사업 착수

- 사업기간 : 2020. 06. 23 ~ 2020. 10. 21.

- 사 업 비 : 252,877천원(도급 197,771  관급 55,106)

◦ 임도변 풀베기 사업시행(85km)                    : 2020. 06. ~ 08.

◦ 임도구조개량사업 시행                                (단위 : 천원)

위치	사업비	사업기간	사업내용	비고
합 계	198,434
교룡산,사매서도, 대산대곡임도	55,353	04. 20. ~ 06. 18.	콘크리트포장 201m 사리부설 718.7m 등	1지구
수지고평,주천호경, 금지택내임도	76,135	04. 20. ~ 06. 18.	콘크리트 포장 467m 사리부설 313.2m 등	2지구
운봉화수,산내중황, 아영일대임도	66,946	04. 20. ~ 06. 18.	콘크리트 포장 342m 사리부설 308.9m 등	3지구

□ 금후계획

◦ 간선임도 신설사업(보절 서치, 산동 대상) 시행        : 2020. 08. ~ 12.

◦ 임도변 풀베기 사업 시행                        : 2020. 9월중

◦ 호우피해지(18개 임도/6,577백만원) 실시설계       : 2020. 9. ~ 11.

숲길 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 덕음산, 만행산, 고리봉, 광암산 등 7개소

◦ 사 업 량 : 68㎞

◦ 사 업 비 : 790백만원(도비 100, 시비 690)

◦ 사업기간 : 2020. 2. ~ 11월

◦ 사업내용 : 등산로 정비(안전시설 설치 및 보수, 풀베기 등)

□ 추진실적

사업명	위치	사업량 (㎞)	사업내용	사업비 (백만원)	비고
계				533
허브밸리 바래봉 데크공사	운봉읍 용산리	0.18	데크로드108.4m	122	완료
등산로 정비	만행산 고리봉	3.90	계단 90단, 로프난간 49경간, 로프교체 171m 등	54	완료
	광암산 복음산	1.51	목재계단 123단, 로프난간 12경간, 데크로드 17m, 방향표지판 3개소 등	58	완료
	덕두산, 백두대간	0.95	목재계단(B1.2) 1개소 10단, 로프난간 1개소(4경간), 방향표지판 8개소 등	62	완료
	덕음산	2.3	데크 156㎡, 로프난간 18경간, 보행매트 360m, 야간안전유도장치 276EA, 원주목 계단 223단 등	204	50%
등산로 풀베기(1차)	4개소	19	덕음산, 뒷밤재, 광암산, 계룡산(사매 오신~관풍)	9	완료
등산로 풀베기(2차)	4개소	23	복음산, 기린봉, 교룡산, 고산봉	10	완료
등산로 풀베기(3차)	2개소	35	견두산, 만행산	14	완료

□ 주요쟁점 및 애로사항

◦ 산주 동의서 징구 어려움(사유재산침해 우려로 동의 불가 입장 표명)

- 산주 미동의 구간(데크시설) 설계 변경 후 사업 추진

□ 금후계획

◦ 등산로 풀베기 시행                                : 2020. 9월한

산불방지 대책

□ 개    요

◦ 임야면적 : 46,910ha(시 면적의 62.4%)

◦ 사 업 비 : 2,113백만원(국비 384, 도비 331, 시비 1,398)

◦ 기    간 : 봄철(2. 1. ~ 5. 15.) / 가을철(11. 1. ~ 12. 15.)

◦ 사업내용 : 진화대 등 산불인력 운영, 산불진화차량 및 장비운영, 산불헬기 임차 등

※ 봄철 산불발생 현황 : 13건(농산폐기물 7건, 논밭두렁 2건, 기타 4건) / 0.8ha

□ 추진실적

◦ 봄철 산불방지대책본부 운영(21개소) : 2. 1 ~ 5. 15(105일간)

- 산불방지 특별대책 수립·운영 : 청명·한식, 가정의달 연휴, 제21대 총선 등

- 산불전문진화대 및 감시원 운영 : 120명(진화대27명, 감시원 93명)

- 전라북도 임차헬기 배치 : 1대 / 대산군비행장

- 입산통제구역 지정 및 등산로 폐쇄 : 7개소 5,801ha / 7개 노선 24km

◦ 장비 교체·구입 및 시설보완

- 산불진화차량 교체 구입 : 진화차 1대 / 48백만원

- 산불감시카메라 및 무전기 교체 구입 : 54백만원 / 카메라 3대 및 무전기 10대

- 산불위험물질 사전제거용 파쇄기 구입 : 30백만원 / 파쇄기 3대

- 산불방지센터 시설보완 : 체력기구, 먼지털이기 등 구입 / 10백만원

◦ 봄철 산불 예방·홍보 활동 : 마을방송, 안내문자 및 리플릿 16,000부 제작·배부

□ 쟁점 및 대책

◦ 산불방지 및 미세먼지 저감대책으로 소각 전면 금지에 따른 민원 발생 증가

□ 농산폐기물 등 산불위험물질 제거를 위하여 파쇄기를 농업기술센터 농기계임대사업소 배치, 위탁 운영 실시(민간 무상 임대)

□ 금후계획

◦ 가을철 산불방지 대책본부 운영 : 11. 1. ~ 12. 15.(45일간)

- 산불전문진화대 및 감시원 운영 : 120명(진화대 27명, 감시원 93명)

- 홍보활동 : 리플릿 배부, 홍보영상 시청, 안내문자, 마을방송 등

산림병해충 방제 및 보호수 관리

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내일원

◦ 사 업 량 : 105ha

◦ 사 업 비 : 392백만원(국비 49, 도비 21, 시비 320)

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12월

◦ 사업내용 : 소나무 재선충병 예찰, 보호수 정비사업, 농림지 동시발생 해충 예찰 방제 등

※ 소나무재선충병 발생 현황 : 1차(용정동 2본), 2차(산곡동 1본), 3차(용정동 1본)

□ 추진실적

◦ 소나무 재선충병 발생에 따른 반출금지구역 지정(15개 동·리 3,906ha) : 2020. 1월 ~

◦ 소나무류 이동감시초소 운영(3개소)	: 2020. 1 ~ 4월

◦ 소나무 재선충병 방제사업 시행(50.98ha, 128백만원) : 2020. 3. 12. ~ 3. 31.

- 위    치 : 용정동, 산곡동, 내척동, 향교동 및 광한루원, 남원관광지

- 사업내용 : 벌채 및 파쇄 15.38ha, 예방나무주사 35.6ha

◦ 관내 임야 병해충 방제 추진(매미나방, 흰불나방 등)	: 2020. 5 ~ 6월

◦ 산림병해충 예찰활동 추진(검경의뢰 599건)	: 2020. 2 ~ 11월

◦ 생활권 수목진료 민간컨설팅 용역	: 2020. 2 ~ 10월

◦ 보호수 생육환경개선 및 쉼터조성사업(11개소/149백만원)  : 2020. 2 ~ 7월

□ 쟁점 및 대책

◦ 소나무재선충병 확산 우려 및 인접 시·군(임실, 순창 등) 소나무 재선충병 발생으로 지속적인 방제사업 추진 필요

□ 방제사업 추진을 위하여 산림청 및 전라북도 예산 2억원 지원 요청 건의 중에 있음

□ 금후계획

◦ 보호수 정비사업 실시(주생지당)	: 2020. 10 ~ 11월

◦ 소나무 재선충병 방제사업(2차) 실시	: 2020. 11 ~ 12월

숲가꾸기사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내일원

◦ 사 업 량 : 1,130ha

◦ 사 업 비 : 1,800백만원(국비 900, 도비 270, 시비 630)

◦ 사업기간 : 2020. 1 ~ 12월

◦ 사업내용

- 조림지가꾸기   : 900ha / 1,378백만원(조림 당해연도~5년)

- 어린나무가꾸기 : 150ha / 229백만원(조림 5년~10년)

- 큰나무가꾸기   : 80ha / 193백만원(조림 15년부터, 천연림 등)

□ 추진실적

◦ 통합숲가꾸기(완료)

- 이백면 등 5개면 37ha / 62백만원

◦ 조림지가꾸기사업 1차 시행중(공정율 : 70%)

- 운봉 등 9개 면‧동 240ha / 350백만원 (유)푸른산림 외 3개업체

◦ 조림지가꾸기사업 2차 시행중(공정율 : 70%)

- 대산 8개 면‧동 190ha / 297백만원 ㈜신림조경건설 외 3개업체

□ 금후계획

◦ 숲 가꾸기 사업 지속 시행

- 조림지가꾸기 3, 4차 사업시행 : 470ha / 732백만원(8월 ~ 9월한)

- 어린나무가꾸기 사업시행 : 133ha / 197백만원(9월 ~ 10월한)

․ 산동면 대기리 산44임 외

- 큰나무가꾸기(2차) : 60ha / 162백만원(8월 ~ 10월한)

․ 왕정동 산1임 외 대상지 조사 및 설계중(공정율 : 40%)

◦ 2021년도 숲 가꾸기 사업 사전설계 : 12월한

․ 어현동 37-99임 외 20ha 예정지 조사 및 사전설계

◦ 지속가능한 산림자원 관리지침에 의한 관리감독 철저 및 적기 사업 완료

도시숲 및 가로수 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 유휴지, 자투리땅, 시유림 / 읍·면·동 가로수 전체

◦ 사 업 량 : 도시숲 1.5㏊, 가로수 조성 8.7㎞

◦ 사 업 비 : 1,060백만원(도비 530, 시비 530)

◦ 사업기간 : 2020. 1 ~ 12월

◦ 사업내용 : 생활권 주변 녹색공간 조성으로 도심 열섬현상 완화 및

아름다운 가로경관 창출로 도심미관 향상 도모

□ 추진실적

구 분	위 치	사업량	사업내용	사업비	비고
계		0.9ha, 6.7km	교목 1,192주 관목 15,740본	703백만원
도시숲	요천 생태습지	0.1ha	메타세콰이어 73주 이식	26백만원
	관문도로 화단 (용정동 산111-4번지)	0.2ha	소나무 외 4종 52주 영산홍 외 2종 7,000본	95백만원	공사중지
	어현동 37-147번지 일원 (오감만족숲 일원)	0.6ha	수수꽃다리 외 2종 95주 조팝나무 외 2종 8,740본	155백만원	공사중지
가로수	금동로	0.7km	산딸나무 104주	35백만원
	이백 백암천	2.1km	왕벚나무 249주	87백만원
	동남원 IC 진입로	1.3km	배롱나무 174주	74백만원
	갈치천	0.9km	배롱나무 150주	62백만원
	이백 강기천	0.8km	왕벚나무 119주	41백만원
	주천 배덕리	0.5km	왕벚나무 123주	42백만원
	주천면 주천리	0.4km	배롱나무 외 1종 43주	26백만원
명상숲	남원중학교	1식	소나무 10주	60백만원	공사중지

□ 금후계획

구 분	위 치	사업량	사업내용	사업비	비고
계		0.6ha, 2.0km		357백만원
도시숲	오감만족 숲 일원	0.3ha	배수시설 보완	60백만원
	백두대간 유아숲 체험원	0.3ha	하층식재, 배수시설 보완	64백만원
가로수	아영면 아백로	0.7km	가로수 보식	80백만원
	고속도로 진입로	1.3km	가로수 식재	80백만원
	사매면 매내천	1.0km	가로수 식재	73백만원

요천변·향기원·신생마을 운영관리

□ 개    요

◦ 위    치 : 요천변 ‧ 향기원 ‧ 신생마을

◦ 사업규모 : 73,373㎡

◦ 사 업 비 : 90백만원(시비)

◦ 사업기간 : 2020. 1 ~ 11월

◦ 사업내용 : 사계절 꽃단지 조성, 포토존 설치 등

□ 추진실적

◦ 요천변, 향기원 꽃단지 조성 : 메리골드, 페츄니아 등 30,000본 식재

◦ 향기원 조성사업 추진 : 그림자 조명 설치 및 어린이 놀이시설 정비

◦ 신생마을 꽃단지 초화류 보식 : 핑크뮬리, 팜파스 2종 15,250본

◦ 2020년 시양묘장 육묘 : 팬지․비올라 30,000본 육묘

□ 쟁점 및 대책

◦ 집중호우로 인한 하천 범람으로 요천변 꽃단지 조형물 등 유실

□ 부서 협의·기반 조성 이후 자체사업으로 복구 계획

◦ 집중호우로 인한 지반 약화로 신생마을 핑크뮬리 꽃단지 옹벽 붕괴

□ 핑크뮬리 개화(10월) 전 자체사업으로 응급복구 실시

□ 금후계획

◦ 신생마을 옹벽 응급복구 실시                     : 2020. 9월 ~

◦ 시 양묘장 초화류 생산(꽃양배추 외 10종 40만본)      : 2020. 8 ~ 12월

◦ 요천변 꽃단지 복구 작업 실시                    : 2021. 1월 ~

산림소득증대사업

□ 개    요

◦ 사업대상 : 임업인 또는 생산자단체

◦ 사 업 량 : 임산물상품화사업 등 7개사업

◦ 사 업 비 : 1,322백만원(국비 656, 도비 175, 시비 491)

◦ 사업기간 : 1 ~ 12월

□ 추진실적

사 업 명		사 업 비			내 용
		예산액	교부결정	잔액
계		1,322	721	601	182개소
산림작물 생산기반조성	생산기반조성	217	33	184	18개소 (예취기,선별기,전동가위 등 )
	친환경임산물	298	147	151	35개소(혼합유박, 퇴비, 토양개량제)
	생산단지조성 (소액)	308	155	153	17개소 (표고톱밥배지 , 표고하우스, 관정 , 대추비가림 시설 등)
임산물유통 구조개선	임산물상품화	75	43	32	10개소(포장박스, 디자인개발)
	유통기반조성	152	92	60	29개소(저온저장고, 화물차량 등)
백두대간주민소득지원사업	백두대간 주민소득	189	172	17	37개소 (저온저장고, 정제기, 건조기 등)
산림소득작물 재배지원사업		83	79	4	36개소(참두릅, 산마늘)

(단위 : 백만원)

□ 쟁점 및 대책

◦ 전년도 예산신청 농가 사업량 축소 및 사업포기

□ 추가 모집을 통한 대상자 선정 및 사업추진

◦ 설계 및 인허가 등 사전절차 미이행으로 인한 사업지연

□ 조속히 사업착수하여 마무리 될 수 있도록 지도, 감독

□ 금후계획

◦ 보조사업 추가 대상자선정 및 사업시행              : 2020. 9. ~ 12월

◦ 보조금 지급 및 사후관리 철저                    : 2020. 9. ~ 12월

조 림 사 업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 관내 임야

◦ 사 업 량 : 312ha (백합, 소나무, 상수리, 편백 등 식재)

◦ 사 업 비 : 2,241백만원 (국비 915 도비 352 시비 974)

구 분	사업량	사업예정지	비 고
계	312ha
경제림조성	230ha	벌기령 벌채지, 수종갱신지, 미립목지
재해방지조림	18ha	산사태, 토사유출, 대형산불피해지 등 산림재해지 및 재해우려지
지역특화조림	20ha	운봉 허브밸리, 바래봉 일원
미세먼지저감조림	25ha	도시외곽산림, 생활권 주변 유휴토지, 공공녹지
풍경있는 농산촌가꾸기	9ha	도 공모사업으로 선정 - 대강면 가덕마을 -마을진입로 관목 식재, 섬진강변마을정원조성
특용자원·유휴토지 조성	10ha	임야, 한계농지, 마을 공한지

□ 추진실적

◦ 경제림조성 : 아영면 갈계리 산22 외 99필지/170ha/969백만원

◦ 재해방지조림 : 운봉읍 화수리 산30-3필지/18ha/96백만원

◦ 미세먼지저감조림 : 아영면 갈계리 산25-4 외 24필지/25ha/125백만원

◦ 풍경있는농산촌가꾸기 : 대강 가덕마을 /9ha /184백만원

◦ 지리산허브밸리 특화림조성 : 20ha/348백만원

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 입목가격 하락으로 인한 벌목 면적 감소로 조림사업 시행 어려움

□ 조림실패지 및 산불피해지 등에 조림사업 시행

◦ 산주의 희망수종이 편백으로 편중되어 수종 결정 및 식재의 어려움

□ 산림경영계획 인가 시 토질, 경사도 등 현지 여건에 적합한 수종을 식재토록 적극적인 설득

□ 추진계획

◦ 조림지 활착상황 조사                        : 2020.  8 ~ 9월

◦ 가을철 조림사업 시행 (경제림 60ha)           : 2020.  9 ~ 11월

◦ ‘20년도 실시설계용역 시행                     : 2020. 11 ~ 12월

일반농산어촌개발(산림휴양치유마을)사업

□ 개    요

◦ 일반농산촌개발사업(산림휴양치유마을) : 2개소

- 주천면 노치마을, 산내면 달궁마을

◦ 총사업비 : 917백만원(균특 395, 시비 522)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2020년

◦ 사업내용 : 마을회관 리모델링, 생태공원 조성, 주민역량강화, 산책로 개설 등

□ 추진실적

◦ 주천 노치 산림휴양치유마을사업 준공             : 2020. 04. 10.

- 노치 러브하우스 신축, 백두대간 산책로 정비, 목돌 정비 등

◦ 산내 달궁 산림휴양치유마을사업 실시설계 용역      : 2020. 05. 15.

◦ 산내 달궁 산림휴양치유마을 만들기 사업 착수     : 2020. 07. 16.

- 사업기간 : 2020. 07. 16 ~ 2020. 11. 12.

- 사 업 비 : 296,593천원

- 사업내용 : 마을회관 리모델링, 재활용쓰레기함, 정원만들기, 안내판 설치 등

□ 쟁점 및 대책

◦ 코로나19 로 주민역량강화 사업 추진 지연

□ 코로나19 추이에 따른 사업 착수시기 고려

□ 금후계획

◦ 산내 달궁 산림휴양치유마을 공사 시행         : 2020. 09. ~ 12월중

백두대간 생태교육장 운영 및 관리

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍 운봉로 151일원 / 행정공안길 299일원

◦ 면    적 : 전시관(에코롯지·캠핑장) 78,028㎡/ 체험휴양시설 210,545㎡

◦ 사 업 비 : 984백만원(전시관 611, 체험휴양시설 221, 에코롯지 110, 캠핑장 42)

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12월

◦ 사업내용 : 전시관 및 체험휴양시설, 에코롯지 및 캠핑장 운영, 방학 특별전 개최, 물놀이장 및 산림치유 프로그램 운영 등

◦ 인력현황

구 분	계	일반직	청원경찰	공무직	기간제	비고
계	22	4	6	7	5
전 시 관	9	4	-	4	1
체험휴양시설	6	-	3	2	1
에코롯지‧캠핑장	7	-	3	1	3

□ 추진실적

【전 시 관】

◦ 운영실적 : 방문객 15,420명(무료 10,793, 유료 4,627) / 수입금 8백만원

◦ 겨울방학 특별전 운영(9,277명/7백만원)	: `19. 12. 18. ~ `20. 2. 4.

▸ 코로나-19 감염 및 확산 예방을 위한 임시 휴관(2.26.~5.11.)

▸ 코로나-19로 인한 여름 특별전 미시행 및 물놀이터 휴장

【체험휴양시설】

◦ 트리하우스 : 736명 / 184실 / 16백만원

◦ 캠 핑 장 : 444명 / 111면 / 2백만원

▸ 동절기 휴장(19.11.~20.3.) 및 코로나-19 임시 휴장(19.2.26.~5.18.)

【에코롯지·캠핑장】

◦ 에코롯지 : 1,216명 / 304실 / 33백만원

◦ 캠 핑 장 : 4,032명 / 1,008면 / 30백만원

▸ 코로나-19 감염 및 확산 예방을 위한 임시 휴장(19.2.26.~5.18.)

□ 쟁점 및 대책

◦ 코로나-19로 인한 수시 방역 및 방문객 관리(발열 체크 등) 중이나 관리 인력 발열 등 유증상 시 대체 인력 전무

□ 마스크 착용 등 방역수칙 준수하여 업무 누수 예방

□ 금후계획

◦ 백두대간 전시관 주차장 태양광발전시설 설치공사      : 6. ~ 10.

◦ 트리하우스, 에코롯지, 캠핑장 운영 및 관리	: 계속

◦ 코로나-19 추이에 따라 겨울특별전 개최 여부 검토