2021년도 국가예산확보 추진실적

상수도사업소

□ 사업현황(총괄)

(단위 : 억원)

구 분	건수	총 사 업 비					국 비 요구액	부 처 반영액	기재부 반영액
		계	국비	도비	시비	기타
총 계	2	372.30	195.61	32.50	144.19	0.00	64.64	64.64	64.64
국가사업
국고보조	1	47.30	33.11		14.19		17.00	17.00	17.00
기 금
균 특	1	325	162.5	32.5	130		47.64	47.64	47.64
특 교 세

구 분	건수	총 사 업 비					국 비 요구액	부 처 반영액	기재부 반영액
		계	국비	도비	시비	기타
총 계	2	372.30	195.61	32.50	144.19	0.00	112.29	112.29	112.29
계속사업	1	325	162.5	32.5	130		95.29	95.29	95.29
신규사업	1	47.30	33.11		14.19		17.00	17.00	17.00
공모사업

월락정수장 현대화 전면 개량사업

【균특·계속】

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도통동 555-1 (상수도사업소 내)

◦ 사업기간 : 2019 ~2022년 (4년)

◦ 사 업 량 : 정수장 시설 전면개량 Q=15,000㎥/일

◦ 총사업비 : 325억원(국비 162.5, 도비 32.5, 시비 130)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2020	2021	2022이후
계	325	24.34	97.38	95.29	107.99
국 비	162.5	12.17	48.69	47.64	54.00
도 비	32.50	2.43	9.74	9.53	10.80
시 비	130.00	9.74	38.95	38.12	43.19
기 타	0.00	-	-	-	-

‘21 국비 요구액 : 47.64	부처 반영액 : 47.64	기재부 반영액 : 47.64

□ 추진상황

◦ 월락정수장 개량사업(1차분) 착공	: `19. 12. ~

◦ 수배전반 이설 및 관리동, 여과지 착공	: `20. 2. ~ 3.

◦ 관리동 기초, 1층 벽체, 슬라브 콘크리트 타설	: `20. 3. ~ 4.

◦ 여과지 가시설, 기초 콘크리트 타설, 벽체시공	: `20. 3. ~ 4.

□ 금후계획

◦ 관리동 입주, 여과지 준공	: `20. 9월 중

◦ 현 관리동 철거 및 정수지 착공	: `20. 10월 ~

◦ 전체공사 준공                                        : `22. 6월 이전

스마트 관망관리 인프라 구축사업

【국고보조, 신규】

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 전역(28,313전)

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2022(2개년)

◦ 사업내용 : 정밀여과장치, 자동수질측정장치, 자동드레인설비,

스마트미터링, 위기대응 등

◦ 총사업비 : 47억원(국비 33, 시비 14)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2020	2021	2022이후
계	47.30	-	-	24.00	23.30
국 비	33.11	-	-	17.00	16.11
도 비	-	-	-	-	-
시 비	14.19	-	-	7.00	7.19
기 타	-	-	-	-	-

‘21 국비 요구액 : 17.00	부처 반영액 : 17.00	기재부 반영액 : 17.00

□ 추진실적

◦ 스마트 관망관리 기본계획 수립용역 추진(환경부)   : `20. 1. ~ 12.

◦ 2021년도 사업대상지 선정	: `20. 3.

◦ 사업 추진을 위한 권역별 설명회 참석(환경부 주체) : `20. 7. 31.

□ 금후계획

◦ 인프라 구축을 위한 현지 조사	: `20. 8. ~ 11.

- 지자체 의견수렴 및 시스템 구축 기술별 개소수, 금액 산정

◦ 스마트 관망관리 인프라 구축 사업 추진	: `21. 1. ~ `22. 12.

- 1차 : 실시간수압계, 스마트 관로 시설정보 인식체계, 워터코디·닥터

- 2차 : 소규모 유량감시, 스마트 미터

- 3차 : 재염소설비, 정밀여과장치, 수질측정장치, 관세척, 자동드레인