2021. 1.

2021년 주요업무 계획

안 전 재 난 과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2020년 주요업무 결산

□ 2021년 중점 추진방향

□ 2021년 주요업무 계획

◦ 섬진강 수해피해 산정조사 용역

◦ 풍촌 재해위험개선지구 정비사업

◦ 재난종합상황(재난안전대책본부) 관리

◦ 여름철 물놀이 안전관리

◦ 안전문화 정착을 위한 시민안전의식 제고

◦ 남원시 시민안전보험 추진

◦ 향토예비군 육성 지원

◦ 민방위 교육 및 시설 관리

◦ 안전한 도시환경 구축

◦ 자연재해 사전대비 추진

◦ 재난관리기금 운용 관리

◦ 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 용역

◦ 소규모 공공시설 정비사업 추진

◦ CCTV 통합관제센터 운영

◦ 마을방범용 CCTV 설치

일  반  현  황

□ 기    구

									안전재난과장
									정 덕 량
안전민방위담당						사회재난담당							자연재난담당						통합관제담당
고 홍 석						문 인 구							서 지 호						최 효 문
∘안전관리계획 총괄 ∘안전교육·신고 ∘물놀이 안전 관리 ∘통합방위 업무 ∘민방위교육·훈련						∘사회재난 사전대비 ∘재난대응 훈련 ∘수상레저·유선장관리 ∘재난관리자원 비축 ∘재난상황실 운영							∘자연재난 사전대비 ∘자연재난복구총괄 ∘재해위험지구 정비 ∘재난관리기금 운용관리 ∘재난음성통보시스템						∘통합관제센터 운영 ∘CCTV 장비유지 관리 ∘방범용 CCTV 설치 ∘차량번호인식 cctv ∘ 마을방범용 cctv설치

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	19	1	4	6	3	5
현 원	19	1	10	3	3	2
증 감	-	-	6	△3	-	△3

2020년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 2020년 재난관리평가 우수기관 선정(행정안전부-국무총리 표창) ◦ 국·도비 예산 확보 : 7개 사업 / 1,246백만원 ◦ 재난예방행정으로 안전한 도시 환경 조성 - 설 , 추석명절 시기별 안전점검 실시 : 20개소(판매시설 12, 여객시설 6, 상영관 2) - 국가안전대진단 : 4개 분야 / 20개소 ◦ 비상대비 훈련으로 지역 안보 태세 확립에 기여 - 민방위 사이버 교육 3,202명 ◦안전한 도시문화 조성 - 어린이 안전문화 미디어교실 운영 : 27개소 1,223명 - 재난취약가구 화재감지기 보급 추진 : 200세대

□ 국·도비 확보를 통한 재해예방사업 추진 : 7건 / 1,246백만원

◦ 재해위험개선지구 정비(대산 풍촌)	:  1개소 / 196백만원

◦ 소규모 공공시설 정비	:  6개소 / 448백만원

- 세천(주천 내기, 주천 제바위, 대강 송내), 소교량(내척동 내동, 이백 효기, 산동 부절)

◦ 재해위험 방재시설 정비	:  1개소 / 90백만원

- 운봉 권포천 재해위험시설

◦ 폭염 대책(야외무더위쉼터, 그늘목 식재)	:  2개사업 / 142백만원

◦ 폭염 저감시설설치(쿨링포그)                :  44개    / 200백만원

◦ 차량번호인식용 CCTV 설치 및 교체	:  13대    / 170백만원

□ 비상대비 훈련을 통한 지역 안보태세 확립

◦ 민방위 전 대원(민방위대장 포함) 사이버교육 실시 : 3,202명

◦ 온라인 비상대비훈련 및 통합방의협의회 개최 : 5회

□ 빈틈없는 24시간 재난종합상황 관리

◦ 재난 종합상황 관리를 위해 연중 근무 : 일 4명(주간 2, 야간 2)

◦ 기상특보 발령에 따른 지대본 운영 및 비상근무 실시 : 46회

※ 대설 1, 호우 16, 태풍 5, 폭염 24

◦ 코로나19 『재난안전대책본부』운영

- 운영기간 : 2020. 1. 31. ~ 상황 종료시 까지 / 실무반 : 5개반 7명

- 해외입국자 및 접촉자 중 음성판정 받은 자가격리자 관리

- 집단감염 위험시설 점검 관리 등

□ 선제적 대응을 위한 재난·재해예방 기반 구축

◦ 2020년 재난관리평가 우수기관 선정(행정안전부-국무총리 표창)

◦ 자연재난 종합대책 수립·추진(풍수해, 지진, 폭염 등)

◦ 재해취약지 점검·정비 : 330개소

- 인명피해우려지역 8, 급경사지 80, 재해위험저수지 13, 배수펌프장 1, 산사태위험지역 228

◦ 취약시기별 시설물 안전점검 : 2회 20개소 / 국가안전대진단 4개분야 20개소

□ 생활 속 안전문화 정착

◦ 안전신문고 앱 활용 위해요소 신고 : 2,543건

◦ 안전점검의 날 행사(다중이용시설 캠페인·안전점검) : 6회

◦ 재난취약가구 화재감지기 보급 : 200세대 / 5백만원

◦ 어린이 안전문화 미디어교실 운영 : 27개소 1,223명

◦ CCTV 통합관제센터 구축을 통한 시민 생활안전 제고 : 910대

	아쉬운 점
◦ 코로나19 영향으로 노인·장애인·어린이 등 취약계층 안전교육 취소 ▶ 집합교육 외에도 생애주기별로 안전교육을 반복·지속적으로 받을 수 있도록 다양한 안전교육 컨텐츠(동영상, 책자 등) 제작 배부

2021년 중점 추진방향

재난·재해의 체계적 종합 대응으로

안전도시 구현

	중 점 추 진 과 제
◦ 재난안전 기능 강화 - 재난안전 민·관 관리체계 역량 강화 - 신속한 재난전파 시스템, CCTV 통합관제 센터 운영 ◦ 재난·재해 선제적 대응 - 재해취약지역 사전점검·정비, 피해최소화 - 재해위험개선지구·재해취약지구 조기 완공 추진 - 시기별 재난취약시설 중점 안전점검, 물놀이 안전사고 예방 ◦ 생활 속 안전문화 정착 - 시민주도 안전신고 및 안전문화 생활화 - 안전교육 강화 및 안전시스템 구축 ◦ 철저한 비상 대비태세 확립 - 실질적 민방위훈련, 지역 방위역량 강화 - 을지태극연습 내실화, 비상대비태세 확립

2021년 주요업무 계획

섬진강 수해피해 산정조사 용역

(신규사업)

□ 개    요

◦ 과 업 명 : 남원 섬진강 수해피해에 따른 피해산정조사 용역

◦ 위    치 : 섬진강 주변 3개면 홍수피해 1,128세대(송동 122, 금지 832, 대강 174)

◦ 용 역 비 : 768백만원(도 기금 384, 시 기금 384)

◦ 과업내용 : 섬진강 수해피해에 따른 사유시설 피해산정 조사

◦ 용역기간 : 2021. 1. ∼2021. 6 (5개월)

□ 추진 실적

◦ 입찰 의뢰 (시 → 조달청)	: 2020. 12. 07.

◦ 수해피해에 산정조사 원가계산 용역시행	: 2020. 12. 15.

◦ 제안서 평가위원(후보자)모집 공고	: 2020. 12. 15.

□ 추진 계획

◦ 수해피해 산정조사 용역 입찰 공고                : 2021. 01.

◦ 제안서 접수, 평가 및 가격입찰                    : 2021. 01.∼

◦ 수해피해 산정조사 용역 추진                     : 2021. 01∼06.

□ 기대효과

◦ 수해피해 재발 방지를 위한 재해대책 수립 활용

풍촌 재해위험개선지구 정비사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 지 구 명 : 풍촌지구 재해위험개선지구

◦ 위    치 : 남원시 대산면 감동마을 ~ 주생면 광촌마을

◦ 위험유형 : 침수위험지구 “나”등급 / 202,905㎡

◦ 사 업 량

- 제방 정비 L=2,640m, 교량 재가설 11개소

- 배수통관 증설 1개소, 배수로 정비 L=1,500m 등

◦ 사업기간 : 2021. 01. ~ 2023. 12.(3개년)

◦ 총사업비 : 9,502백만원(국 4,751, 도 1,900.4, 시 2,850.6)

(단위 : 백만원)

	구 분	합 계	기투자	2021년	2022년 이후	비 고
	합 계	9,502	-	280	9,222
	국 비	4,751	-	140	4,611
	도 비	1,900.4	-	56	1,844.4
	시 비	2,850.6		84	2,766.6

□ 추진실적

◦ 재해위험지역 정비사업 중기계획 변경         : 2020. 03. 03.

◦ 재해위험개선지구 지정 고시                  : 2020. 08. 28.

◦ 2021년 재해위험지역 정비사업 예산 가내시    : 2020. 09. 22.

□ 추진계획

◦ 실시설계용역 추진	: 2021. 01. ~ 08.

◦ 재해예방사업 추진지침(행안부) 사전설계 심의(전북도)    : 2021. 09.

◦ 사업 추진	: 2022. 01. ~ 2023. 12.

□ 기대효과

◦ 집중호우 시 제방 월류에 의한 주거지 및 농경지 피해발생예방

재난종합상황(재난안전대책본부) 관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 관리대상 : 자연재난, 사회재난(인적재난, 국가기반체계 마비, 전염병 등)

◦ 운용장소 : 재난안전상황실 (시의회 4층)

◦ 상황유지 : 지속적인 상황관리 유지(24시간)

◦ 내    용 : 신속한 정보수집 및 상황전파 등 대응태세 확립

□ 추진실적

◦ 재난 종합상황 관리를 위해 연중 근무 : 일 4명(주간 2, 야간 2)

- 상황전파 : 사건접수, 보고·전파, 상황 조치 등

- 비상근무 : 자연재해(주의보·경보)발령시, 사회재난 발생시

◦ 코로나19 『재난안전대책본부』운영

- 운영기간 : 2020. 1. 31. ~ 상황 종료시 까지

- 실 무 반 : 5개반 7명

- 해외입국자 및 접촉자 중 음성판정 받은 자가격리자 관리

- 집단감염 위험시설 점검 관리 등

◦ 기상특보 발령에 따른 지대본 운영 및 비상근무 실시 : 46회

구 분	대설·한파		호 우			태 풍			폭 염
	횟수	인원		횟수	인원		횟수	인원		횟수	인원
합 계	1	42		16	808		5	478		24	1,316
주의보	1	42		14	588		3	258		17	714
경 보	-	-		2	220		2	220		7	602

□ 금후계획

◦ 대설, 폭염, 태풍 등 자연재해 대비 비상근무 실시

◦ 사건·사고 발생시 신속한 상황전파, 보고 등 상황유지 관리

◦ 상시 재난대비(예방, 대비, 대응, 복구) 체계 유지

여름철 물놀이 안전관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 목    표 : 물놀이 안전사고 및 인명피해 최소화

◦ 추진기간 : 사전대비(‘21.4.15 ~ 5.31) 특별안전관리(‘21.6.1 ~ 8.31)

◦ 대    상 : 계곡·하천 물놀이 관리지역

* 과거 인명사고 발생지역, 깊은 소용돌이 지역, 물놀이 객이 많은 지역 중심

◦ 내    용

물놀이 안전환경 조성	·물놀이 지역과 안전시설에 대한 전수조사(4월까지) ·구명조끼·로프·이동식 거치대 및 노후 인명구조함 정비
현장중심 안전관리	·물놀이 안전요원 선발·교육(6월) 및 현장배치(7~8월) - 장소 : 14개소 (금지 1, 산동 3, 산내 6, 요천시내 4) - 인원 : 40명 (산내 : 4인 1개조, 기타 : 2인 1개조) - 근무 : 위험구역 접근 통제, 물놀이 지역 순찰
홍보 및 교육 강화	·여름방학 전 어린이 안전교실, 구명조끼 착용법 등 교육 ·물놀이 안전 홍보물 배부, 현장 안전수칙 캠페인 실시

□ 추진실적

◦ 물놀이 안전관리 및 코로나19 방역활동 추진    : 2020. 7 ~ 8월

- 심장자동충격기 구입 비치 : 5대(운봉1, 산동1, 노암2, 도통1)

- 물놀이 안전용품 구입(부표 , 구명조끼, 투척로프 , 구명환 등)

- 물놀이 지역 안전관리 및 코로나19 방역초소 운영

◦ 2020년 물놀이 인명사고 : 없음

□ 금후계획

◦ 안전시설․장비확충, 안전관리요원 모집․교육	: 2021. 5 ~ 6월

◦ 물놀이 안전관리요원 배치, 근무 점검	: 2021. 7 ~ 8월

안전문화 정착을 위한 시민안전의식 제고

(계속사업)

□ 개    요

구 분	추진사항	시 기	내 용
교 육 홍 보	안전점검의 날	매월	민관합동 점검□캠페인
	안전문화미디어교실	연중	어린이집□유치원 순회 방문교육
	생활안전교육	분기	재난취약계층, 안전도우미 양성
	안전신고	연중	안전신문고 앱 활용 위해요소 신고
점 검	축제□시설물 안전관리	연중	축제장/다중이용시설 안전점검
	국가안전 대진단	2~4월	분야별 시설물 안전점검
훈 련	지진□화재대피 훈련	5월	실제상황 대비 현장훈련 강화
	안전한국훈련	10월	다중이용시설 대형재난 수행 역할 훈련

□ 추진실적

◦ 안전점검의 날 운영	: 6회

◦ 안전신문고 신고 실적	: 2,543건

◦ 어린이 안전미디어교실                          : 27개소 1,223명

◦ 국가안전대진단 실시                                : 4개분야 20개시설

□ 금후계획

◦ 국가안전대진단 실시	: 2021. 2 ~ 4월

◦ 어린이 안전문화 미디어 교실 운영	: 2021. 3 ~ 10월

◦ 찾아가는 생활안전교육 실시	: 2021. 3 ~ 11월

◦ 안전한국훈련(현장, 토론 등) 실시	: 2021. 10월

◦ 지역축제 및 시설물 안전점검, 안전점검의 날     : 연      중

남원시 시민안전보험 추진

(계속사업)

□ 개    요

◦ 가입대상 : 남원시에 주민등록이 되어있는 모든 시민(등록외국인 포함)

◦ 보장항목 : 11개 항목

①  자연재해 (일사병, 열사병 포함) 사망    ②  익사사망

③  폭발·화재·붕괴로 인한 사망         ④  폭발·화재·붕괴로 인한 사고 후유장해

⑤ 대중교통이용 중 상해 사망        ⑥  대중교통이용 중 상해 후유장해

⑦  강도 상해 사망                   ⑧ 강도 상해 후유장해

⑨  농기계 사고로 인한 상해 사망           ⑩  농기계 사고로 인한 상해 후유장해

⑪ 만 12세 이하인 사람의 스쿨존 교통사고 부상치료비

※ 15세 미만자의 경우 사망담보 제외(상법 제732조)

◦ 보장금액 : 10백만원 한도

◦ 소요예산 : 연 36백만원 정도

□ 추진실적

◦ 보상내역 : 39백만원  ※ 4건 (사망 3, 상해 1) - 화재 1, 익사 1, 농기계 2    ◦ 남원시 시민안전보험 2021추진 계획 수립              : 2020. 11월

□ 금후계획

◦ 남원시 시민안전보험 가입 시민 홍보              : 2021. 1월

※ 신문․전광판․현수막 및 이장회의자료, 시정소식지, SNS 등 적극 홍보

◦ 한국지방제정공제회 보험 가입                 : 2021. 1월 4일

◦ 남원시 시민안전보험 보험개시                   : 2021. 1월 8일

향토예비군 육성 지원

(계속사업)

□ 개    요

◦ 근    거 : 예비군법 제14조의 3, 동법시행령 제32조

- 지방자치단체의 장은 그 관할구역의 예비군을 육성·지원하여야 함

◦ 편성현황 : 13개 중대 2,485명

◦ 사 업 비 : 485백만원(경상보조 58, 자본보조 427)

◦ 지원내용

- 예비군 사무실 운영 유지 및 장비물자 지원, 민․관․군 홍보 등

- 향토방위작전과 관련 급식, 수송, 통신 및 전투시설 지원

- 예비군 사기 앙양, 민․관․군의 유대강화 및 홍보 등

- 예비군 안보교육관 리모델링 및 증축 (396㎡)

□ 추진실적

◦ 2020년 예비군 육성·지원 보조금 교부(3대대)      : 2020. 2. 22.

◦ 2020년 예비군 안보교육관 증축 및 리모델링(3대대) : 326백만원

◦ 예비군 육성·지원 사업 추진

- 경상보조(예비군 작계훈련 지원비 등 24개 항목)	: 79백만원

- 자본보조(예비군중대 사무기기 등 16개 항목)	: 80백만원

□ 금후계획

◦ 2020년도 사업비 정산 검사                       : 2021. 1월

◦ 2021년도 예비군 육성·지원 보조금 교부          : 2021. 2월중

- 경상보조(예비군 작계훈련 지원비 등 16개 항목)	: 72백만원

- 자본보조(예비군 전투물자 구매비 등 8개 항목)    : 93백만원

민방위 교육 및 시설관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 민방위대 편성 기준일 : 매년 1월 10일

◦ 편성대상 : 만 20세부터 만 40세까지 성인남자(3,200명 정도)

- 4년차 이하 : 4시간(집합교육)

- 5년차 이상 : 1시간(비상소집훈련 또는 사이버교육)

◦ 교육내용 : 역할과 임무, 화재, 교통, 가스, 지진 행동요령

□ 추진실적

◦ 2020 민방위 사이버교육 추진                : 2020. 7 ~ 12월

- 온라인 교육 홍보 및 교육통지서 배부

- 교육대상 3,202명 / 이수율 3,042명(95%)

※ 코로나19로 인해 집합교육을 사이버교육으로 대체 실시

◦ 민방위 시설장비 및 유지관리                : 연중

- 경보시설(시청 등 8개소), 주민대피시설(공무원교육원 등 31개소),

비상급수시설(운봉 삼산체육공원 등 12개소), 민방위·화생방 장비(7종)

□ 금후계획

◦ ‘21 민방위교육 지침시달 및 자원조사            : 2021. 1월

◦ ‘21 민방위 교육훈련 계획 수립(일정·교육과목 등) : 2021. 2월

◦ ‘21 민방위 교육 홍보 및 교육실시               : 2021. 4. ~ 11월

◦ 민방위 경보시설 신규 설치(1개소/산동면)        : 2021. 1. ~ 3월

◦ 민방위 시설장비 일제점검 및 유지관리              : 상․하반기 / 연중

안전한 도시환경 구축

(계속사업)

□ 개    요                                 (단위 : 백만원)

사 업 명	사업위치	사 업 량	사 업 비	사업기간
CCTV 설치 및 교 체	·북남원 IC 등 50개소	·차번인식CCTV : 13대 ·생활방범CCTV : 90대	334	2021. 01. ~ 10.
폭염피해예방 그 늘 막 구 입·설 치	·향교동 1, 도통동 2, 노암동 2	·그늘막 설치 : 5개소	10	2021. 03. ~ 05.
재난취약가구 화재감지기 보 급	·남원시 관내	·화재감지기 : 200대	26	2021. 02. ~ 12.

□ 추진실적

◦‘20년 차번인식 CCTV 설치                 : 13대(신규 7,  교체 6)

◦‘20년 생활방범 CCTV 설치	: 155대(신규 105, 교체 50)

◦ 보행자 사고예방 안전의자 설치                        : 18개소

◦ 승강기 안전사고 예방 홍보(스티커 3종, 동영상 배부)        :  49개소

◦ 범죄예방 시설물(로고젝터) 설치	:   7개소

◦ 재난취약가구 화재감지기 보급                         : 200대

□ 금후계획

◦ CCTV 신규 설치 및 교체 추진	: 2021. 2 ~ 10월

◦ 그늘막 설치 대상지 점검 및 조달 구입·설치	: 2021. 3 ~ 5월

◦ 읍면동별 화재감지 대상가구 선정 및 설치	: 2021. 2 ~ 12월

자연재해 사전대비 추진

(계속사업)

□ 개    요

◦ 자연재해 기상특보 기준

종류	주 의 보	경 보
폭염	일 최고체감온도가 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때	일 최고체감온도가 35℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때
호우	3시간 강우량이 60mm이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm이상 예상될 때	3시간 강우량이 90mm이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm이상 예상될 때
태풍	① 호우 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 ② 육상에서 풍속 14m/s이상 또는 순간풍속 20m/s 이상이 예상될때	①풍속 21m/s 이상 또는 순간풍속 26m/s이상 예상될 때 ② 총 강우량이 200mm이상 예상될 때
대설	24시간 신적설이 5cm이상 예상될 때	24시간 신적설이 20cm이상 예상될 때

□ 추진실적

◦ 여름철 자연재난 대책기간 운영	: 2020. 5. 15. ~ 10. 15.

- 상반기 수방자재(공구) 구입·배부	: 2020. 5. 14.

·7종 635개(수방자재 4종 619개 / 공구 3종 16개)

- 그늘막(46개소), 무더위쉼터(537개소) 관리 및 점검 : 2020. 5월

- 우수저류시설 및 우기대비 재해예방 사업장 현장점검 : 2020. 5. 18. ~ 5. 20.

※ 코로나19 감염확산에 따른 무더위쉼터 임시 휴관

→ 부득이 운영할 경우, 손소독제 비치 및 마스크 착용 준수 지도

◦ 폭염 대응 종합대책 추진 : 2020. 5. 15. ~ 9. 30.

- 시가지 기온저감 도로 살수 : 9개 노선 4개 구간 L=18km, (일 4대 합동 살수)

◦ 하반기 수방자재(공구) 구입·배부	: 2020. 11. 3.

- 7종 8,177개(수방자재 6종 8,140개 / 공구 5종 37개)

◦ 겨울철 자연재난 대책기간 운영 : 2020. 11. 15. ~ 2021. 3. 15.

- 제설도구함 및 제설도구 설치·운영(7개동 25개소)  : 2020. 11월

- 내 집ㆍ내 점포 앞 눈치우기 현수막 게첨(25개소)   : 2020. 12월

- 제설작업용 친환경제설제 구입·배부  (2,088포/25kg)  : 2020. 12. 9

□ 금후계획

◦ 여름철 자연재난 사전대비 추진       : 2021. 2. 15. ~ 5. 14.

◦ 겨울철 자연재난 사전대비 추진       : 2021. 9. 20. ~ 11. 14.

재난관리기금 운용 관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 2021년 확보액 : 2,046백만원

(2020년 이월액 1,516백만원, 출연금 336, 도비보조금 185, 이자 9)

◦ 2021년 기금사업 내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	기대효과
합 계	525
물놀이 위험구역 부표 구입	10	재난예방
재난 예방 홍보(풍수해,폭염,한파,대설,지진 등)	15	재난예방
수방자재 및 제설자재 구입	20	재난예방
공공시설 응급복구 장비 지원	50	응급복구
재난 피해예방 긴급대응(풍수해,폭염,한파,대설,지진 등)	50	긴급대응
감염병 피해예방 긴급대응	20	긴급대응
침수흔적도 작성	60	재난예방
재해위험지구 지정 및 타당성조사	100	재난예방
자동우량 경보시설 설치	200	재난예방

□ 추진실적

◦ ‘19 결산보고 및 ‘21 운용계획 심의회	: 2020. 10. 23.

◦ ‘21 재난관리기금 운용계획안 심의(시의회)	: 2020. 12. 04.

□ 금후계획

◦ ‘21년 재난관리기금 집행	: 2021. 1. ~ 12월

- 침수흔적도 작성, 재해위험지구 지정 및 타당성조사 등 (525백만원)

소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 용역

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업목적 : 소규모 공공시설의 체계적 관리 및 재해예방

◦ 사 업 량 : 남원시 전역(A=752.2㎢)

- 소규모 공공시설(6종) 약 4,400개소 정도

◦ 사업기간 : 2020. 1. 29. ~ 2022. 1. 17.(착수일로부터 24개월)

◦ 사 업 비 : 1,282백만원(특교세 400, 시비 882)

◦ 사업내용

- 소규모 공공시설 전수조사, 측량 및 DB 구축

- 소규모 공공시설 Web 관리시스템 구축

□ 추진실적

◦ 선도사업 선정                                    : 2019. 04. 12.

◦ 2회추경 예산 반영	: 2019. 10. 01.

◦ 업체 선정(도화Eng 등 4개사) 및 용역 착수         : 2020. 01. 29.

- 소규모 공공시설 대상 시설물 현장 조사 실시 중

□ 금후계획

◦ 현지 조사 완료                                     : 2021. 05월

◦ 조사 시설물에 대한 읍면동 확인 및 누락분 등 협의      : 2021. 06월

◦ 실과소 관련법 중복지정 여부 협의                   : 2021. 06월

◦ 조사완료에 따른 전북도, 행안부 협의                : 2021. 07월

◦ 정비계획 수립 및 지정 고시                         : 2021. 10월~

소규모 공공시설 정비사업 추진

(계속사업)

□ 개    요

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비				사업기간	비 고
		계	국비	도비	시비
계		1,119	-	448	671
주천 내기세천 정비사업	호안정비 L=100m	100	-	40	60	‘21. 01. ~ ‘21. 12.
내척동 내동마을 소교량 정비사업	L=8m, B=6m	200	-	80	120	‘21. 01. ~ ‘21. 12.
주천 제바위세천 정비사업	호안정비 L=250m	270	-	108	162	‘21. 01. ~ ‘21. 12.
대강 송내세천 정비사업	호안 정비 L=80m	100	-	40	60	‘21. 01. ~ ‘21. 12.
이백 효기 소교량 정비사업	L=10m, B=4m	225	-	90	135	‘21. 01. ~ ‘21. 12.
산동 부절 소교량 정비사업	L=10m, B=5m	224	-	90	134	‘21. 01. ~ ‘21. 12.

□ 추진실적

◦ 소규모 공공시설 지정·고시	: 2019. 06. 10.

◦ 소규모 공공시설 정비를 위한 도비 확보	: 6개소 / 448백만원

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 추진 및 행정절차 이행	: 2021. 01. ~ 04.

◦ 사업 조기발주 및 견실시공 추진	: 2021. 05. ~ 12.

CCTV 통합관제센터 운영

(계속사업)

□ 개    요

◦ 설립목적 : 사건 사고 발생 시 신속 대응 체계 구축

◦ 센터개원 : 2018년 5월 16일 / 센터면적 : 175㎡(53평)

◦ 사 업 비 : 1,526백만원

◦ 관제인원 : 14명(경찰2, 관제요원12)

◦ 관제규모 : 910대(방범 774, 재해예방 54, 주정차 71, 문화재감시 7, 쓰레기 4)

구 분	계	방범용			재해예방		주정차	문화재	쓰레기	비 고
		차 량 방 범	생 활 방 범	어린이 보 호	하 천 재 해	산 불 감 시
관제대상	910	102	398	274	47	7	71	7	4

□ 추진실적

◦ 연도별 관제 실적

연 도	계	2018	2019	2020	비 고
건 수	219	43	91	85

◦ 20년 관제실적 : 85건

유형별	계	도 주 차 량	폭 행 절 도	교 통 사 고	탈 선 가 출	행 인 안 전	재 난 안 전	기 타	비 고
건 수	85	2	7	5	18	13	25	15

◦ 유지보수업체

구 분	계	2018. 5월	2019	2020	2021	비 고
업 체		환경개발(주)	환경개발(주)	대신관리공사(주)	엠파워(유)
금 액	1,585,866	243,153	470,000	431,213	441,500	(단위:천원)

□ 금후계획

◦ CCTV 확대설치로 사건사고 발생 검색 빈도 증가로 개인정보관리 강화

◦ CCTV사업 시 경찰서, 치안협의회, QGIS(CCTV취약지구)활용 검토 반영

마을방범용 CCTV 설치

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사 업 비 : 200백만원

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

◦ 사 업 량 : 50개소 400대(교체 50)

구 분	카 메 라	모 니 터	녹 화 기	비 고
규격	800만 화소 이상(적외선)	27인치 이상 Full HD LED	16채널(10TB)	추 가 시 마 을 자체부담
대수	8대	1대	1대

◦ 장비사양 : 녹화기, 모니터, CCTV 8대

□ 추진실적

◦ 2020년 마을방범용 CCTV 신규 설치 및 교체     : 2020. 1월 ~ 10월

- 50개소 300대(신규 20개소/120대, 교체 30개소/180대)

◦ 2021년 설치대상지 수요조사 실시	: 2020. 9월 ~ 11월

□ 금후계획

◦ 2021년 설치 대상지 현지 확인 및 확정	: 2021. 1. ~ 2월

- 2020년 수해발생 마을 우선 추진

◦ 마을방범 CCTV 교체 추진	: 2021. 2. ~ 10월

◦ 마을방범 CCTV시스템(녹화기 등) 운용 설치 시 교육	: 2021. 2. ~ 10월