2021. 1.

2021년 주요업무 계획

건    설    과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2020년 주요업무 결산

□ 2021년 중점 추진방향

□ 2021년 주요업무 계획

◦ 국가하천 스마트 홍수관리시스템

◦ 겨울철 도로 제설대책 추진

◦ 도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 변경 용역

◦ 읍면지역 안전한 도로망 확충 정비

◦ 읍면지역시도 정비현황

◦ 농어촌도로 정비현황

◦ 통행불편 마을진입로 정비현황

◦ 위험도로 선형개선

◦ 도로 유지관리사업

◦ 도로 재해복구사업

◦ 지방하천 정비사업

◦ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업

◦ 소하천 정비사업

◦ 하천 유지관리사업

◦ 요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성

◦ 하천 재해복구사업

일  반  현  황

□ 기    구

															건설과장
															진영신
건설행정담당													도로담당																		하천담당
양 병 오													김 현 호																		백 강 규
설해대책추진 도로 유지 관리․보수 도로 점‧사용 허가 국‧공유 재산관리 노점상‧과적 단속													읍면시도 확․포장사업 농어촌도로 확․포장사업 기업유치 기반시설 확충사업 통행불편 도로사업 도로 유지 관리사업																		치 수 사 업 하천유지관리 육상골재채취․허가 공유수면관리 하천점․사용허가

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	36	1	3	7	4	4	□공무직 : 17
현 원	35	1	6	5	2	5	□공무직 : 16
증 감	△1	-	3	△2	△2	1	△1

2020년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 지방재정 확충을 위한 국가예산 확보에 총력 - 국도․국지도 건설 5개년 계획(`21~`25) 사업 반영 대응(5개 노선) ·국도 24호선(이백~운봉) 2차로 개량, 국지도 37호선(인월~아영) 2차로 확장 및 개량, 국지도 60호선(주천 호경~고기) 2차로 개량, 국도 24호선 (대강 ~ 대산) 2차로 개량, 동부내륙권(정읍~남원) 2차로 개량 - 대강 하이패스 I.C 설치(한국도로공사) ※ 도로와 다른 시설 연결허가 신청(시 → 도공) - 춘향휴게소(순천~완주간 고속도로) 조기 착공 ※ `20. 12월 건축공사 발주 - 7.28 ~ 8.11 집중호우에 따른 건설분야(도로․하천) 피해 복구 예산 (496억원) 확보 - 국비 483억원, 도비 4억원, 시비 9억원 - 자연재해에 안전하고 쾌적한 하천환경 조성을 위해, 지방하천 정비사업 및 국가하천·기성제·소하천 유지관리사업 국·도비 예산확보 (11,700백만원 / 국비 1,653, 도비 9,647, 특·조 400) - 국가하천 스마트 홍수관리시스템 구축을 위한 설계비(국비 137백만원) 확보 ·실시설계 용역완료 및 사전검토 완료(익산지방국토관리청 : `20. 12. 8.) ◦ 체계적인 도로망 개설로 지역 균형발전 도모 - 주민 실생활에 밀접한 도로망 확충으로 농촌지역 주민 교통 편익 증진 및 정주여건 향상 도모 - 읍면지역시도(오리정~상신), 농어촌도로(행덕선), 통행불편 마을 진입로 (아영 신지, 송동 신기, 덕과 수촌, 보절 내황)도로 개설에 따른 지역 경제 활성화 및 쾌적한 도로망 확충 ◦ 시민 만족 중심의 도로·하천 유지관리 추진 - 도로 유지관리 : 20개 분야 / 59개소 / 8,236백만원 - 하천 유지관리 : 하도준설 및 잡목제거 84개소, 하천·기성제 유지관리 43개소 / 5,107백만원 - 법정 관리도로 총 57개 노선 431km에 대해 겨울철 제설작업, 노후포장도로 정비, 과속방지턱 정비, 도로안전시설물 설치 등 도로 유지관리 총력 - 민원사항 즉시처리 및 시설정비 예산우선투자로, 도로·하천유지관리 만전 - 하천 장비임차료 읍·면·동 자체예산 편성(600백만원)을 통한 응급 복구 및 준설 완료

◦ 도로·하천 수해복구 국가예산 확보 및 조기 추진으로 주민 불편 최소화 - 신속한 응급 복구(57개소, 528백만원)를 실시하고, 재해복구공사 조기 발주를 위해 실시설계 용역 선 발주 추진(9. 11.) - 3억원 이하 소규모 도로·하천 재해복구공사는 2021년 우기 이전 완공목표로 추진하고, 하천 개선복구사업(4개 지구)은 실시설계 용역 및 용지보상 등 관련 행정절차 조기 이행으로 사업 조기 추진 노력 ◦ 소하천 정비사업 총사업비 변경 승인 - 오롱골소하천 정비사업(승인일 : ´20. 3. 13.) [당초 : 1,865백만원 → 변경 : 2,350백만원(증 485백만원 / 증 26%)]

□ 지역 균형발전을 위한 도로개설 - 26개 지구 / 12,025백만원

◦ 읍면지역시도 확포장 4개 지구(L= 8.0㎞, 1,713백만원) / 1개 지구 완공(L=1.0㎞)

◦ 농어촌도로 확포장   8개 지구(L=12.38㎞, 587백만원) / 1개 지구 완공(L=1.25㎞)

◦ 통행불편 마을진입로 13개 지구(L= 7.33㎞, 1,420백만원) / 4개 지구 완공(L=1.97㎞)

◦ 위험도로 선형개량   4개 지구(L= 3.06㎞, 1,900백만원) /  1개 지구 완공(L=0.76㎞)

□ 안전하고 쾌적한 도로 유지관리 – 20개 분야 / 59개소 / 8,236백만원

◦ 관내 주요 도로 아스콘 재포장 : 8개 지구 / 5.5㎞ / 1,191백만원

- 사매면 관촌마을~대신마을 아스콘 재포장, 운봉로 아스콘 재포장 등

◦ 교량(터널)유지관리 및 정밀안전진단 : 11개 지구 / 1,987백만원

- 동림교 내진보강공사, 승사교 외 2개교 정밀안전진단 등

◦ 기타 지역 도로 유지관리사업 추진 : 40개소 / 5,058백만원

- 운봉 삼산 도로 구조개선, 2020년 걷고싶은 도시가로환경(도통, 월락동) 등

□ 재해 사전예방을 위한 하천 정비 – 58개소 / 24,315백만원

◦ 하천 정비(지방하천, 소하천)	:  9개소 / 19,614백만원

- 지방하천 : 4개소 /  13,470백만원(풍천, 원천천, 다산천, 송치천)

- 소 하 천 : 5개소 /  6,144백만원(고평천, 당동천, 오롱골천, 과립천, 산곡천)

◦ 하천 하도준설 및 잡목제거	:  18개소  /    500백만원

◦ 하천 호안 및 제방 정비 추진	:  24개소  / 1,214백만원

◦ 하천유지관리(보조)	:   7개소  /  1,030백만원

◦ 국가하천 유지보수사업(보조)	:     1식  /  1,653백만원

◦ 기성제유지관리(보조)	:     1식  /    304백만원

□ 가족 친화형 수변관광자원 조성 – 1개소 / 3,500백만원

◦ 사 업 명 : 요천 수변관광자원화 사업

◦ 위    치 : 남원시 어현동 741번지 일원 / 요천 국가하천(천변친수지구)

◦ 공사기간 : 2019. 10. 29 ~ 2021. 2. 28

◦ 사 업 비 : 9,150백만원[도비(동부권특별회계)4,150, 시비5,000]

- ‘20년 사업비 : 5,650백만원(도비4,150, 시비1,500)

◦ 사업규모 : 물놀이 분수광장 조성

- 음악분수 L=42m × H=30m, 바닥분수 2개소 및 광장, 물놀이시설 A=1,170㎡

	아쉬운 점
◦ 토지 협의 지연으로 적기 사업 추진 어려움 및 주민 통행불편 초래 ◦ 국도․국지도 내 시설보수, 선형개량, 회전교차로 설치 등 주민 민원 사항에 대해 유관기관(국토관리사무소, 도로관리사업소) 예산 상황으로 단기간 내 건의사항 처리가 어려운 실정임 ◦ 코로나19 및 수해복구로 인한 하천사업추진 지연 발생

2021년 중점 추진방향

안전하고 쾌적한 도로‧하천 환경 조성

	중 점 추 진 과 제
◦ 신속한 재해 복구 - 철저한 항구복구로 2차 재난피해 사전 예방 - 신속한 수해복구공사 마무리를 통한 주민불편 조기 해소 ◦ 생활 밀착형 SOC 시설물 확충 - 위험도로 구조개선으로 주민 생명권․재산권 보호 - 시민 활력을 위한 요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성 ◦ 안전중심 도로환경 - 신속한 제설작업으로 겨울철 안전한 도로 제공 - 재난재해 대비 교량 시설물 내진보강 및 시설물 점검 ◦ 체계적인 도로망 개설 - 환경적 여건 변화를 반영한 도로망 기본계획 수립 - 시·군도 및 농어촌도로 정비로 주민 소득기반 확충 ◦ 자연이 숨 쉬는 하천 - 환경적 여건변화를 반영한 하천정비종합계획 재수립 - 미개수하천의 자연친화적 생태하천 조성

2021년 주요업무 계획

국가하천 스마트 홍수관리시스템

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 국가하천 섬진강, 요천 일원

◦ 사 업 량 : 14개소(섬진강권역 6개소, 요천권역 8개소)

◦ 사업내용 : 수문개량(전동화), 상황실 구축(시청 내), 통신망 연결

- 원격 자동계측·제어·감시, 현장제어, 영상표출, 기록 시스템 등

◦ 사 업 비 : 1,854백만원(국비 100%)

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2021년(2년)

사 업 명	사업량	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
		계	기투자	2021	2022이후
국가하천 스마트 홍수관리시스템	14개소	1,854	137	1,717	-	7.4	‘20 ~‘21

□ 추진계획

◦ 일상감사 및 전라북도 원가심사	: ‘20. 12.

◦ 국가하천 스마트 홍수관리시스템 공사 발주 추진	: `21. 1. ~  6. 30.

□ 기대효과

◦ 수동으로 조작되는 배수문(통문)의 전동화 및 자동화로 실시간 감시 가능

◦ 원격조작을 통해 강우로 인한 수위 상승시 신속하고 효과적인 대응으로 재해를 사전에 예방

겨울철 도로 제설대책 추진

(계속사업)

□ 개    요

◦ 운영 기간 : 2020. 11. 15. ~ 2021. 3. 15.(4개월간)

◦ 제설 대상

계		시 관리국도		지 방 도		시 도		읍면시도(군도)
노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량
57	431.5㎞	3	25.1㎞	8	154.9㎞	24	38.5㎞	22	213㎞

◦ 제설 인력 : 26명(도로보수원 11, 운전원 9(자체 3, 용역 6), 기타 6(용역 6))

◦ 제설 차량 : 13대(15톤 6(임차3), 5톤 2(임차1), 1톤 4(임차2), 굴삭기1)

◦ 제설 장비 : 279대

- 자체 보유 : 27대(제설기 12, 살포기 12, 교반기 1, 저장탱크 1, 호이스트 1)

- 읍 면 동 : 252대(트랙터용제설기 249, 1톤용 제설기 3)

◦ 제설자재 : 염화칼슘 300톤, 소금 1,400톤, 친환경제설제 370톤

□ 추진실적

◦ 설해대책 추진계획 수립	:‘20. 10.

※‘19. 12월 ~‘20. 2월 도로 제설작업 추진(10회)

- 강설일수 19일, 적설일수 10일(대설경보 1회, 대설주의보 1회)

◦ 제설장비 점검 및 상습결빙지역 사전준비	:‘20. 10. ~ 11.

- 제설장비(제설기, 살포기) 부착 및 작동상황 점검 완료

- 미끄럼주의표지판 22개 및 모래주머니 20,000매 설치

◦ 제설차량 임차(6대 - 15톤 3대, 5톤 1대, 1톤 2대)	:‘20. 11.

□ 금후계획

◦ 상황실 운영(건설과 - 2개조 5명, 각 읍면동사무소)    :‘20. 11. 15. ~‘21. 3. 15.

◦ 정령치 도로 통제(고기리삼거리 ~ 정령치 ~ 달궁삼거리)	:‘20. 12.  7. ~‘21. 3. 19.

도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 변경 용역

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 읍면지역

◦ 사 업 량 : 읍면지역시도 및 농어촌도로 353개 노선 L=852.6㎞

◦ 사 업 비 : 500백만원(시비)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2020년(3개년)

◦ 도급업체 : ㈜수성엔지니어링(경남 창원), ㈜성원기술개발(전북 김제)

□ 추진실적

◦ 기본계획 변경 용역 수행	: `18. 4. ~

◦ 농어촌도로 전략환경영향평가 / 사전재해영향성검토 용역 착수 : `18. 11.

◦ 도로건설계획, 농어촌도로 기본계획(변경) 의견반영(읍면동) : `19. 5. ~ 8.

◦ 군도 및 농어촌도로 개선(안) 의견 수렴(남원시의회)       : `19. 11.

< 노선 검토 주요방향 >

◦ 군도 : 도로 개설 실효성 검토, 상위도로로 인한 단절구간 연결(중복결정)

◦ 농어촌도로 : 읍면 의견 수렴에 따른 노선 지정, 마을 주 진입도로

일제 노선 반영, 격하된 군도 노선 신규 지정

< 검토(안) >

(단위 : km)

구 분	당 초		변 경		증 △감
	노선 수	연장	노선 수	연장	노선 수	연장
합 계	353	852.6	410	891.6	57	39.0
군 도	22	215.1	21	164.7	△ 1	△ 50.4
농어촌도로	331	637.5	389	726.9	58	89.4

□ 금후계획

◦ 인접 시군(도) 협의 및 협의의견 검토	: `20. 12.

◦ 전략환경영향평가 및 사전재해영향성검토 용역 수행    : `21. 1. ~ 2.

◦ 도로건설 관리계획 수립 및 농어촌도로 변경 고시	: `21. 3.

읍면지역 안전한 도로망 확충 정비

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업규모 : 도로 정비사업 29개 지구, L = 31.77㎞

◦ 총사업비 : 65,670백만원 (2021 : 12,025백만원)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2027년(11개년)

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 량		총사업비	기투자	2021	2022이후	사업기간
계	29개지구	L=31.77㎞	65,670	27,645	12,025	26,200
읍면지역시도	4개지구	L=8.0㎞	23,600	8,313	5,000	10,287	`17~`24
농어촌도로	8개지구	L=13.38㎞	22,200	6,287	2,950	13,163	`17~`27
통행불편	13개지구	L=7.33㎞	14,370	8,950	2,670	2,750	`17~`23
위험도로 선형개선	4개지구	L=3.06㎞	5,500	4,095	1,405	-	`17~`21

□ 추진실적

◦ 읍면지역시도 : 완공(오리정~상신), 공사 중(부석~오촌, 도산~서매, 평촌~강기)

◦ 농어촌도로   : 완공(행덕선), 공사 중[도용선, 상황선, 배촌선(중송),

영촌선], 설계 중(배촌선, 견두선, 부흥선)

◦ 통행불편     : 완공(보절 내황, 덕과 수촌, 송동 신기, 아영 신지), 공사 중 (아영 구지, 운봉 장동, 인월 중군, 대산 안대실, 이백 오산길, 인월 장평, 주천 제바위) 설계 중(이백 목가, 송동 척동)

◦ 위험도로     : 완공(수지 남창), 공사 중(이백 초촌, 수지 호곡, 군도 29호선)

□ 금후계획

◦ 읍면지역시도 : `21년 완공(도산~서매), `22년 완공(부석~오촌),

(3개 지구)      `24년 완공(평촌~강기)

◦ 농어촌도로   : `21년 완공(도용선, 상황선, 영촌선), `23년 완공(부흥선 호은선),

(6개 지구)      `25년 완공(배촌선), `27년 완공(견두선)

◦ 통행불편     : `21년 완공(아영 구지, 운봉 장동, 인월 중군, 이백 오산길,

(9개 지구)      인월 장평, 대산 안대실), `22년 완공(주천 제바위),

`23년 완공(이백 목가, 송동 척동)

◦ 위험도로     : `21년 완공(수지 호곡, 이백 초촌, 군도 29호선)

(3개 지구)

읍면지역시도 정비현황

(계속사업)

□ 개    요

◦ 계    획 : 19개 지구 / 36.46㎞ / 72,530백만원

◦ 기 투 자 : 15개 지구 / 28.46㎞ / 48,930백만원

◦ 시 행 중 :  4개 지구 /  8.00㎞ / 23,600백만원 ※ 2021 : 5,000백만원

- `20 완공 : 1개 지구, `21 완공 : 2개 지구, `22 완공 : 1개 지구

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2024년(19개년)

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2021	2022이후
합 계	4개지구	8.00	23,600	8,313	5,000	10,287	56
부석~오촌	송동면	2.60	5,900	2,300	800	2,800	52	`17 ~ `22
평촌~강기	이백면	2.50	13,900	3,113	3,700	7,087	49	`17 ~ `24
도산~서매	주생면	1.90	1,500	600	500	400	73	`19 ~ `22
오리정~상신	사매면	1.00	2,300	2,300	-	-	100	`17 ~ `20

□ 추진실적

◦ 부석~오촌     : 2차분 완료(6.24) / 공정률 40%

◦ 평촌~강기

□ 평촌~목가	: 2차분 준공(토공, 배수공, 교량공) / 공정률 60%

□ 목가~강기  : 용지보상 추진(26%)

◦ 도산~서매	: 1차분 추진(토공, 구조물공), 용지보상 추진 / 공정률 30%

◦ 오리정~상신   : 공사 완료(2020.6.18)

□ 금후계획

◦ 2022년 완료   : 1개 지구(부석~오촌, 도산~서매)

◦ 2024년 완료   : 1개 지구(목가~강기) ※ 평촌~목가 : 2021년 완공

농어촌도로 정비현황

(계속사업)

□ 개    요

◦ 계    획 : 24개 지구 / 29.44㎞ / 52,224백만원

◦ 기 투 자 : 17개 지구 / 16.16㎞ / 30,024백만원

◦ 시 행 중 :  8개 지구 / 13.28㎞ / 22,200백만원(※ 2021 : 2,950백만원)

- `20 완공 : 1개 지구, `21 완공 : 3개 지구, `22 이후 : 4개 지구

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2025년(18개년)

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2021	2022이후
합 계	8개지구	13.28	22,200	6,287	2,950	13,163	41
행덕선	운봉읍	1.25	1,600	1,600	-		100	‘17 ~ ‘20
영 촌 선	주생면	1.10	1,600	900	700	-	100	`19 ~ `21
상황선	산내면	0.60	1,950	1,150	800	-	100	‘18 ~ ‘21
도용선	주생면	0.67	1,650	1,100	550	-	100	‘17 ~ ‘21
호은선	주천면	0.90	1,800	-	100	1,900	5	`20 ~ `23
부흥선	보절면	1.20	2,100	87	100	1,913	9	`20 ~ `23
배촌선	주천면	3.56	5,500	900	500	4,100	25	‘19 ~ ‘25
견두선	수지면	4.00	6,000	550	200	5,250	12	‘18 ~ ‘27

□ 추진실적

◦ 행 덕 선     : 공사 완공(10.12.)

◦ 영 촌 선	: 2차분 추진(보조기층 1차 포설 완료) / 공정률 50%

◦ 상 황 선     : 1차분 완료(11.30.) / 공정률 60%

◦ 도 용 선	: 2차분 추진(구조물공, 배수공) / 공정률 60%

◦ 배 촌 선	: 실시설계(공정 90%), 중송지구 2차분 완료(12.3./공정률 65%)

◦ 견 두 선	: 실시설계, 소규모 환경영향평가, 사전재해영향성 검토

용역 완료

□ 금후계획

◦ 2021년 완료  : 3개 지구(영촌선, 상황선, 도용선)

◦ 2023년 완료  : 1개 지구(부흥선, 호은선)

◦ 2025년 완료  : 1개 지구(배촌선)

◦ 2027년 완료  : 1개 지구(견두선)

통행불편 마을진입로 정비현황

(계속사업)

□ 개    요

◦ 계    획 : 60개 지구 / 33.06㎞ / 31,886백만원

◦ 기 투 자 : 42개 지구 / 24.31㎞ / 16,016백만원

◦ 시 행 중 : 13개 지구 /  7.33㎞ / 13,370백만원(※ 2021 : 2,670백만원)

- `20 완공 : 4개 지구 / `21 완공 : 6개 지구 / `22 완공 : 1개 지구

/ `23 완공 : 2개지구

※ 주민 참여 저조로 인한 미추진 8개 지구 : 통행불편 중장기계획 재수립 10개지구

◦ 사업기간 : 2008 ~ 2023년(16개년)

□ 추진실적

◦ 공사 완료 : 4개 지구

- 보절 내황, 덕과 수촌, 송동 신기, 아영 신지

◦ 공사 중 : 7개 지구

- 이백 오산길, 인월 장평, 주천 제바위, 인월 중군, 아영 구지, 운봉 장동, 대산 안대실,

◦ 실시설계 : 2개 지구

- 이백 목가, 송동 척동

□ 금후계획

◦ 2021년 완료 : 6개 지구

- 아영 구지, 운봉 장동, 인월 장평, 인월 중군, 이백 오산길, 대산 안대실

◦ 2022년 완료 : 1개 지구

- 주천 제바위

◦ 2023년 완료 : 2개 지구

- 송동 척동, 이백 목가

□ 통행불편 마을진입로 정비사업 세부내역

사 업 명	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	추진실적	계획 (2021)
		계	기투자	2021	2022 이후
13개 지구	7.33	14,370	8,950	2,670	2,750	81
송동 척동마을 (`21~`23)	0.60	1,000	-	-	1,000	-	실시설계	용지보상
이백 목가마을 (`19~`23)	0.80	1,900	150	100	1,650	13	실시설계	용지보상
주천 제바위마을 (`19~`22)	0.65	900	400	400	100	89	공사추진, 용지보상	용지보상, 완공
아영 구지마을 (`19~`21)	0.34	700	500	200	-	100	공사추진, 용지보상	용지보상, 완공
운봉 장동마을 (`19~`21)	0.45	500	300	200	-	100	공사추진	용지보상, 완공
인월 장평마을 (`19~`21)	0.50	1,800	880	920	-	100	공사추진 용지보상	완공
인월 중군마을 (`17~`21)	0.78	1,950	1,550	400	-	100	-1공구 : 완공 -2공구 :실시설계	용지보상, 완공
이백 오산길 (`19~`21)	0.78	850	400	450	-	100	공사추진, 용지보상	완공
대산 안대실마을 (`18~`21)	0.46	1,250	1,250	-	-	100	공사추진	완공
보절 내황마을 (`17~`20)	1.04	1,620	1,620	-	-	100	완공 (12.03.)	-
덕과 수촌마을 (`19~`20)	0.15	200	200	-	-	100	완공 (10.08.)	-
송동 신기마을 (`19~`20)	0.47	500	500	-	-	100	완공 (06.23.)	-
아영 신지마을 (`17~`20)	0.31	1,200	1,200	-	-	100	완공 (04.04.)	-

위험도로 선형개선

(계속사업)

□ 개    요

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2021	2022이후
합 계	4개지구	3.06	5,500	4,095	1,405	-	100
군도29호선 (지리산IC~아영면사무소)	아영면	1.3	1,900	1,600	300	-	100	‘17 ~ ‘21
수지 호곡	수지면	0.40	2,200	1,095	1,105	-	100	`19 ~ `21
이백 초촌	이백면	0.60	900	900	-	-	100	`20 ~ `21
수지 남창	수지면	0.76	500	500	-	-	100	`18 ~ `20

□ 추진실적

◦ 군도29호선(아영) :  2․3공구 완료(`20.12.) / 공정률 80%

- 1공구 : 아스콘 기층 포설 완료

◦ 수지 호곡	: 1차분 완료(12.3. / 교량 슬라브) / 공정률 50%

◦ 이백 초촌	: 공사 착공(3. 27.), 용지보상 추진(19% 완료)

◦ 수지 남창	: 공사 완공(`20.12.) / 공정률 100%

□ 금후계획

◦ 2021년 완료 : 3개 지구[군도29호선(지리산IC~아영), 수지 호곡, 이백 초촌]

도로 유지관리사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 총사업비 : 6,420백만원(도비 480, 시비 5,940)

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비(백만원)	비 고
합 계		14개 지구	6,420
읍면지역시도	관 내	2개 지구	1,700
농어촌도로	관 내	2개 지구	850
법정도로 유지관리	관 내	10개 지구	3,870

□ 추진실적(2020년) - 20개 지구 / 59개소 / 8,236백만원

◦ 읍면지역시도 유지관리

- 운봉 삼산 도로 구조개선 외 13개소 1,304백만원 추진

◦ 농어촌도로 유지관리

- 덕과 배산 외 1개소 배수정비공사 외 6개소 750백만원 추진

◦ 법정도로 유지관리(재포장)

- 사매 관촌마을~대신마을 아스콘 재포장공사 외 37개소 6,182백만원 추진

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 추진 : `21년도 유지관리사업 집행 잔액을 활용하여

`21년 사업 선용역 발주

◦ 계속사업지구(읍면지역 표지판, 시특법 교량보수보강

사매~덕과 도로 구조개선사업) 공사 추진

□ 도로 유지관리사업 세부내역(2020년)

사 업 명		사업위치	사업량	사업비 (백만원)	비 고
합 계			20개 지구	8,236
읍면지역시도 유지관리			4개 지구	1,304
	시도유지관리	관내	유지관리사업 1식	600
	산동 석동마을	산동면	진출입로 정비 L=0.25㎞	200	`19 : 150
	군도 3호 갓길 포장(방촌)	금지면	아스콘 포장 L=0.4㎞	44
	주민참여예산(운봉, 산동 노암)	관내	유지관리사업 3개소	460
농어촌도로 유지관리			2개 지구	750
	농어촌도로 유지관리	관내	유지관리사업 1식	600
	인월 성산 진입로 정비	인월면	도로 시설개량 L=0.15㎞	150
법정도로 유지관리			14개 지구	6,182
	도로 유지관리보수(시가지)	관내	유지관리사업 1식	800
	시청로~영어마을 인도 정비	도통동	인도 및 도로 구조개선 L=0.26㎞	500
	식정마을 앞 인도 개설	식정동	인도개설 L=0.14㎞	300
	걷고 싶은 거리 조성	관내	인도 유지관리 L=5.1㎞	300
	고죽~갈치 교차로 도로	고죽동	도로 확포장 L=0.43㎞, B=25m	500	`17 ~ `19 : 2,100
	조산교차로 회전로 설치	조산동	회전교차로 1식	280	국 140 시 140
	법정도로 재포장	관내	아스콘 재포장 L=5.0㎞	1,250
	주천 용궁 스노우멜팅	주천면	스노우멜팅 설치 L=0.13㎞	72	도 36 시 36
	로드킬 방지 도로시설물	관내	로드킬 휀스 L=7.1㎞(관문도로)	150	`19 : 150
	교량(터널) 유지관리	관내	교량 유지보수(시특법 6개)	300
	법정관리 대상시설물 정밀 안전점검	시특법 2종 5개소	정밀 안전점검 1식	150	소방 45 시 105
	노후교량 정밀 안전진단	의총교 축천교	정밀 안전진단 1식	80
	시특법 교량 내진보강	남원대교 동림교	내진보강공사 1식(받침교체)	500	`19: 1,100
	교량 내진보강(왕정, 율천)	왕정교 율천교	내진보강공사 1식(받침교체)	1,000	소방 300 시 700

□ 도로 유지관리사업 세부내역(2021년)

사 업 명		사업위치	사업량	사업비 (백만원)	비 고
합 계			14개 지구	6,420
읍면지역시도 유지관리			2개 지구	1,700
	시도유지관리	관내	유지관리사업 1식	500
	주민참여예산	L=3.89㎞	유지관리 사업 14개소	1,200
농어촌도로 유지관리			2개 지구	850
	농어촌도로 유지관리	관내	유지관리사업 1식	500
	구일선 배수개선	아영면	도로 배수개선 L=0.23㎞	350
법정도로 유지관리			10개 지구	3,870
	읍면지역 표지판 정비	관내	표지판 정비 1식	150	총사업비 : 300
	도로 결빙 예방사업	어현동 (문오로)	동결 억제 포장 L=0.34㎞	450	도 135 시 315
	교량 내진보강공사	이백교, 주송교	교량받침교체 120개	1,000	도 300 시 700
	법정관리 시설물 안전점검	관내	정밀안전점검 용역 1식	150	도 45 시 105
	시특법 교량 보수보강공사	승사교	교면 재포장 A=4,560㎡	120	총사업비 : 1,600
	사매~덕과 도로 구조개선	사매면, 덕과면	도로 시설개선 L=1.0㎞	600	총사업비 : 1,300
	걷고 싶은 거리 조성	관내	인도 유지관리사업 1식	100
	교량(터널) 유지관리	관내	교량 유지보수(시특법 6개)	300
	도로 유지관리보수(동지역)	관내	유지관리사업 1식	500
	법정도로 재포장	관내	유지관리사업 1식	500

도로 재해복구사업 추진

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 관내 도로

◦ 사 업 량 : 법정도로 15개소

◦ 복구내역

(단위 : 백만원)

구 분	개소	피해액	복 구 액				비 고
			계	국비	도비	시비
계	15	775	2,242	1,454	100	100
군도ㆍ농어촌도	9	403	1,254	1,254	-	-	국 100%
시 도	4	228	588	-	-	588	시 100%
시관리 지방도	2	144	400	200	100	100	국 50%, 도 25%, 시 25%

□ 추진실적

◦ 응급복구공사 추진(자체 시비)	: ‘20.  8. ~ 10.

- 지방도 및 시관리 도로 20개소, 132백만원

◦ 수해복구 실시설계 용역 추진	: ‘20.  9. 11. ~

◦ 호우피해 복구액(국ㆍ도비) 확정	: ‘20.  9. 24.

◦ 호우피해 복구예산 교부결정(도로)	: ‘20. 10. 26.

- 추가 경정예산 성립전 사용 승인(‘20.11.17)

◦ 도로 수해복구공사 발주 완료(13개소)	: ‘20. 12.

□ 금후계획

◦ 미발주 2개소 공사 발주	: ‘21.  1.

◦ 공사 완공(15개소)	: ‘21.  6.

지방하천 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 아영면 풍천 외 3개소

◦ 사업기간 : 2012 ~ 2022년(11개년)

◦ 총 계 획 : 21개 지구 / 98.43㎞ / 190,771백만원

- 완료지구 : 13개 지구 / 45.05㎞ / 105,918백만원

(송내천, 내척천, 괴양천, 진기천, 백암천, 운교천, 풍천, 요천, 수외천, 수지천, 주촌천, 갈치천, 람천)

- `21년 사업 : 3개 지구 / 16,688백만원(도비 11,332, 시비 5,356)

하천별	지구별	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2021	2022이후
합 계	4개하천	22.94	78,628	40,514	16,688	21,426	73
풍 천	소 계	5.50	37,351	21,808	6,500	9,043	76	`14 ~ `22
	청계지구	0.88	6,961	6,961	-	-	100	`17년준공
	풍천지구	4.62	30,390	14,847	6,500	9,043	70	`18 ~ `22
송치천	주천송치	2.04	9,966	9,466	500	-	100	`16 ~ `21
원천천	신촌~주천	13.70	23,583	6,200	5,000	12,383	48	`17 ~ `22
다산천	덕과만도	1.70	7,728	3,040	4,688	-	100	`18 ~ `21

┍ 원천천 : 당초(MP) 18,821백만원 ⇨ 설계금액23,583백만원(증 4,762 / 증 25.3%)

┕ 다산천 : 당초(MP)  4,554백만원 ⇨ 설계금액 7,728백만원(증 3,174 / 증 69.7%)

□ 추진실적

◦ 풍  천(인월·두락·의지) : 2차분 시행(의지지구 L=2.1km) 취암교 등    / 공정률 50%

◦ 송치천 : 타절준공 완료, 타절잔여분 공사 추진중	/ 공정률 90%

◦ 원천천 : (1차분) 추진중                              / 공정률 30%

◦ 다산천 : (2차분) 추진중                              / 공정률 40%

□ 금후계획

◦ 2021년 완료 : 2개 지구(송치천, 다산천)

◦ 2022년 완료 : 2개 지구(풍  천, 원천천)

원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 신촌동 요천 합류부 ~ 주천면 고기리 일원

◦ 사 업 량 : 관광자원화 친수공간 조성 L=13.7㎞

- 축제 2.78km, 호안 5.16km, 자전거길 6.6㎞, 보․낙차공 12개소, 교량 9개소 등

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2022년(6개년)

◦ 총사업비 : 23,583백만원(국비 1,600, 도비 14,908, 시비 7,075)

- 2021년 사업비 : 5,000백만원

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진                          : ‘16.  9. 28.

◦ 용역 중간보고회 개최(시장)	: ‘18.  8.  3.

◦ 주민설명회 개최	: ‘18. 11. 29.

◦ 실시설계(안) 총사업비 변경 협의(1차) 요청 / 익산청   : ‘19.  3. 29.

- 사업비 : 당초 MP상 18,821백만원 → 24,147백만원(증 5,326)

◦ 설계VE 완료(총사업비 100억원 이상 건설공사)         : ‘19.  5.  3.

◦ 실시설계(안) 총사업비 변경 협의(2차) 요청 / 익산청    : ‘19.  7. 19.

- 사업비 : 당초 MP상 18,821백만원 → 23,139백만원(증 4,318 / 증 23%)

◦ 지방건설기술심의(전라북도)	: ‘19.  9. 23.

◦ 조달청 원가심사 및 공사발주 의뢰                    : ‘19. 10.  8.

◦ 실시설계(안) 총사업비 변경 협의(3차) 승인 / 익산청    : ‘19. 11.  4.

- 사업비 : 당초 MP상 18,821백만원 → 23,583백만원(증 4,762 / 증 25.3%)

◦ 시설공사 도급업체 선정 및 착수                      : ‘19. 12. 23.

□ 금후계획

◦ 시설공사 1차분 준공	: ‘21. 4.

◦ 시설공사 2차분 추진 및 준공	: ‘21. 3. ~ ‘21. 12.

- 편입용지 토지 협의 매수 병행 추진

◦ 시설공사 총괄분 준공	: ‘22. 12.

소하천 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 30개지구 / 20.78㎞ / 44,511백만원

- 완료지구 :  7개지구 /  6.61㎞ / 20,762백만원

(뒤하천, 율치천, 율정천, 아곡천, 신동천, 장교천, 고평천)

-‘21년사업 : 4개지구 / 5,082백만원〔시비 5,082 (100%)〕※ 균특 지방이양에 따른 시비 부담금 증액

◦ 위    치 : 남원시 아영면 당동천 외 3개소

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2023년 (8개년)

지구별	위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2021	2022이후
합 계	4개 하천	6.96	19,610	6,897	5,082	7,631	61
당동천	아영 봉대	2.69	10,711	4,859	2,500	3,352	69	‘18~‘22
오롱골천	운봉 주촌	0.82	2,350	1,768	582	-	100	‘19~‘20
과립천	이백 과립	2.20	4,180	160	1,000	3,020	28	‘20~‘23
산곡천	향교동	1.25	2,369	110	1,000	1,259	47	‘20~‘22

□ 추진실적

◦ 당동천 : 1, 2차분 추진 (호안정비 L=2.0km) 및 교량 1개소 등	/ 공정률 30%

◦ 오롱골천 : 1차분 추진 (하천정비 L=0.7km) 및 교량 1개소 등	/ 공정률 47%

◦ 과립천,산곡천 : 실시설계 용역 사전설계검토 및 원가심사예정(전라북도)

□ 금후계획

◦ 2021년 완료 : 1개 사업(오롱골천)

◦ 2022년 완료 : 2개 사업(당동천, 산곡천)

◦ 2023년 완료 : 1개 사업(과립천)

하천 유지관리사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 소하천‧지방하천‧국가하천 일원

◦ 사 업 량 : 3개사업 / L =105.04km

◦ 사 업 비 : 5,360백만원(국비982, 도비1,384 시비 2,994)

◦ 사업기간 : 2021년

구 분	사업내용	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
합 계	3개 사업	105.04	5,360
하천 유지관리사업	하천 유지관리	15.0	600
	하천 하도준설	20.0	500
	주민참여예산	1.09	375
	소규모 민원해결	1.20	175
기성제 유지관리사업	지방하천 기성제 정비	30.0	2,728
국가하천 유지보수사업	섬진강, 요천 유지관리	38.9	982

□ 추진실적<2020년>

◦ 읍·면·동 하천 유지관리사업 대상지 제출 및 현지조사	: `19. 12. 11.

【 하천 및 기성제 유지관리사업 】

◦ 하천유지관리사업 추진	: `20. 1. ~ 12.

- 하도준설 완료 / 이백면 채곡천 외 17개소(L=5.26km)

- 유지관리 완료 / 이백면 서곡천 외 12개소(L=0.65km)

- 주민참여예산사업 완료 / 사매면 구적골천 외 10개소(L=1.6km)

【 국가하천 유지보수사업 】

◦ 국가하천 요천 제방보수공사 외 14건 완료	: `20.  1. ~ 12.

◦ 국가하천 스마트 홍수관리 시스템 실시설계 용역 완료	: `20. 10. ~ 11.

□ 금후계획<2021년>

◦ 2021년 하천유지관리사업 및 하도준설사업 실시설계 및 공사추진	: `21. 1. ~ 11.

- 공사추진 : 관내 하천(지방하천·소하천) 유지관리 및 하도준설

◦ 국가하천(섬진강‧요천) 유지관리사업 실시설계 및 공사추진	: `21. 1. ~ 11.

- 공사추진 : 관내 하천(국가하천) 유지관리 및 하도준설

요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성

<요천 수변 관광 자원화 사업>

(계속사업)

□ 사업개요

◦ 위    치 : 남원시 어현동 741번지 일원 / 요천 국가하천(고수부지/천변친수지구)

◦ 사 업 량 : 물놀이 분수광장 조성

- 음악분수 L=42m, 바닥분수 2개소 및 광장, 물놀이시설 A=1,170㎡

◦ 총공사비 : 9,150백만원[도비(동부권특별회계) 4,150, 시비 5,000]

- `20년 사업비 : 5,650백만원(도비 4,150, 시비 1,500)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2021년(5개년)

□ 추진실적

◦ 요천 내 수경시설 설치 추진계획 보고           : ‘17.  6. 28.

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진                   : ‘17. 10. ~ `18. 12.

◦ 사업계획 변경 추진보고                       : ‘18. 11. 23.

※ 당초 : 수경시설(분수) / 중앙저수로 ⇨ 변경 : 물놀이 분수광장 / 고수부지

◦ 음악분수 공법선정 심의 완료                  : ‘19.  6. 17.

◦ 2019년 제2차 재정투자 재심의 완료(전라북도)   : ‘19.  6. 28.

◦ 하천점용허가 승인(익산청)                     : ‘19.  9. 30.

◦ 시공업체 선정 및 공사 착수	: ‘19. 10. 29.

◦ 관급자재[음악분수 시스템] 구입                : ‘20.  3. 25.

◦ 사업계획 변경승인(도 관광총괄과)              : ‘20.  8. 18.

- 변경 승인내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사업기간	- 2018~2020(3년)	- 2018~2021(4년)	변경
사 업 비	- 9,300백만원	- 9,150백만원(△150)	변경
위 치	- 남원시 어현동 741번지 일원	남원시 어현동 741번지 일원	변경없음
사업내용	- 음악분수 L=42m*H=30m 바닥분수 2개소 광장조성 물놀이 시설 A=1,170㎡	- 음악분수 L=42m*H=30m 바닥분수 2개소 광장조성 물놀이 시설 A=1,170㎡	변경없음

◦ 시의회 호우피해상황 보고                     : ‘20.  9. 16.

□ 주요쟁점 및 애로사항

◦ ‘20. 8. 7. ~ 8. 9. 집중호우로 고수부지 범람에 따른 분수시설 및 물놀이장 피해 발생(누적강우량 평균 411mm)

- 음악분수 상류 둔치 기존 운동시설 바닥 유실로 콘크리트구체, 호박돌, 잡석, 부유물 등이 분수시설(노즐, 수중등 등)과 물놀이장(바닥, 벽체) 충돌로 시설물 파손

□ 도급 계약물량 중 피해부분은 빠른 시일 내 복구하고 계약이행 조치 : ‘21. 2.

□ 사업장 주변시설 보수・보강으로 피해재발방지 대책수립 및 추진

- 사업장 상류 기존 운동트랙 보강 및 저수호안, 고수부지 시설 개량(지수벽+사석)

- 음악분수 상부 노즐 보호벽 추가 설치 등

□ 예산집행 세부내용

◦공사비 집행현황                                         (단위 : 백만원)

공 사 명	공사내용	사업비	집행액		공정률 (%)	도급업체	비고 (준공예정일)
			금 액	집행률(%)
합 계	7개소	9,117	7,498	82.2	90		공정률90%
요천수변관광 자원화사업 (토목+건축+기계설비)	º 음악분수 L=42m*H=30m, 바닥분수 2개소 및 광장, 물놀이 시설 A=1,170㎡	합계: 5,677 ┍ 도급: 4,491 ┕ 관급: 1,186	합계: 4,689 ┍ 도급: 4,103 ┕ 관급: 586	82.6	85	세움종합건설㈜ 대표:안석문	․1차분 준공 : ‘20.7.15 ․2차분 추진 ( ‘20.11.30 )
	º 음악분수 시스템구입 설치	관급: 3,094	2,644	85.4	90	레인보우(주) 대표: 정운익	진행중 ( ‘20.12.30 )
전기공사	º 수배전반 신설(변압기 용량 750KVA), 전력간선설비 1식	합계: 152 ┍ 도급: 93 ┕ 관급: 59	0	0	90	영일산업 주식회사 대표:김선웅	진행중 ( ‘21.01.29 )
통신공사	º 통신인입및 설비 1식	도급: 9	0	0	40	㈜주왕산업 대표:나윤경	진행중 ( ‘21.01.28)
전기감리 용역	º 전기공사 감리 1식	도급: 10	10	100	100	세웅이엔씨 대표:이영욱	준 공
폐기물 처리용역	º 폐기물처리 670톤	도급: 20	0	0	80	중앙산업(유) 대표:이정우	진행중 ( ‘’20.09.28 )
실시설계 용역	º 기본 및 실시설계 용역 1식	도급: 155	155	100	100	명우건설기술공사(주) 대표:최정희	완 료

※ 예산집행 : 7,498백만원(집행률 82%)

- 1차분 준공, 2차분 선금, 음악분수 시스템 선고지 및 기성금, 감리비 용역, 기타 관급자재 지급

□ 금후계획

◦ 시설공사 추진 및 준공	: ‘20. 12. ~ ‘21. 5.

◦ 물놀이시설 및 분수광장 운영	: ‘21.  5. ~

◦ 시설물 인수인계 추진	: ‘21.  5. ~

하천 재해복구사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 71개지구 / 47,373백만원

◦ 위    치 : 국가하천 조산지구 외 70개소

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2022년 (3개년)

(단위 : 백만원)

구 분	계	국비	도비	시비	비고
합 계(71개소)	47,373	46,837	268	268
국가하천(9)	2,765	2,765	-	-	남원시 대행사업
지방하천(23)	8,294	7,832	231	231	-
소하천(35)	5,313	5,239	37	37	-
개선복구(지방하천,2)	19,848	19,848	-	-	주촌천, 효촌천
개선복구(소하천,2)	11,153	11,153	-	-	감동천, 서당천

□ 추진실적

◦ 하천 응급복구공사 추진(자체 시비)	: ´20.  8. ~ 10.

- 37개소 / 396백만원(예비비)

◦ 재해복구사업 실시설계 용역 추진	: ´20.  9. 11. ~

- 11건 / 884백만원

◦ 피해 복구액(국·도비) 확정	: ´20.  9. 24.

◦ 예산 성립전 사용승인(13,045백만원)	: ´20. 11. 17.

◦ 개선복구사업 실시설계 용역 추진	: ´20. 11. 25. ~

◦ 재해복구사업 공사 추진	: ´20. 12.  7. ~

- 총 71개소 중 4개소 발주완료

- 공사 중 4개소 : 광치천(친수지구), 요천 자전거도로 3개 지구

□ 금후계획

◦ 미발주 67개소 공사발주	: ´21.  1.

◦ 소규모시설(71개소) 공사완료	: ´21.  7.

◦ 하천 개선복구사업(4개소) 용역완료 및 공사추진	: ´21. 11.

- 신속한 행정절차 추진 및 공사 발주로, 2021년 우기 전 위험구간 우선정비 추진

-  현장 품질·안전관리 및 민원업무의 신속한 해소 등 원활한 공사추진을 위해  “하천 개선복구사업 통합건설사업관리 용역” 추진 예정