2021. 1.

2021년 주요업무 계획

환 경 사 업 소

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2020년 주요업무 결산

□ 2021년 중점 추진방향

□ 2021년 주요업무 계획

◦ 하수도 수해복구사업 추진

◦ 남원처리구역 하수관로 확장사업

◦ 아영 인풍지구 하수관로 정비사업

◦ 산내지구 하수관로 정비사업

◦ 요천생태습지공원 관리

◦ 남원하수처리장 운영 및 시설개선

◦ 강우시 하수관로 시범사업

◦ 노후 하수관로 정비사업

◦ 남원(3단계) 하수관로 정비사업

◦ 소규모 마을하수처리시설 개량사업

◦ 운봉·인월·소규모 하수도시설 운영관리

일  반  현  황

□ 기    구

									환경사업소장
									왕 길 성
하수경영담당					하수시설담당								하수처리담당										마을하수담당
박 병 준					강 자 청								유 홍 규										문 하 성
∘행정 종합계획 수립 ∘공공 시설물 관리 ∘공기업 특별회계 운영 ∘요천생태습지공원 관리 ∘하수도 요금 부과징수 ∘물 재이용 사업 추진					∘하수도 중장기계획 수립 ∘하수관거정비 사업 추진 (노후,남원3단계,용전,서도 등) ∘오수중계펌프장 관리 ∘배수설비 설치신고 및 관리 ∘하수도 원인자 부담금 부과징수								∘하수처리 종합계획 수립 ∘남원하수처리장 운영 ∘분뇨처리시설 운영 ∘슬러지 등 탄화시설 운영 ∘음식물폐기물 처리시설 운영 및 관리										∘운봉·인월 하수처리장 관리 ∘소규모 마을하수처리장 관리 (노후시설 개량사업 등) ∘낙동강수계 기금관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	22	1	4	5	6	6	청 경 2 환경관리원 2 공 무 직 3
현 원	20	1	9	3	3	4	청 경 2 환경관리원 3 공 무 직 3
증 감	△2	-	5	△2	△3	△2	1

2020년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 하수처리시설 효율적인 운영 및 시설정비로 하천수질 보전 ◦ 공기업 효율적 운영 및 시민 휴식 공간 제공 ◦ 하수관로 정비 및 차집관로 성능개선으로 불명수 차단 ◦ 마을하수처리장 시설 개선 및 관리강화로 안정적 운영

□ 하수처리시설 효율적인 운영 및 시설 정비로 하천 수질 보전

◦ 방류수 수질기준 준수를 위한 공정별 특성에 따른 운전관리 강화

◦ 하수처리 노후시설 개선 및 처리공정 고도화로 안정적 수질관리

◦ 하수의 적정처리로 주민 공중위생 향상 및 하천수질 개선

□ 공기업 효율적 운영 및 시민 휴식 공간 제공

◦ 요금현실화, 국비보조금 확보 등 적극적인 재원 마련 및 투자 재원의 계획적 배분을 통한 효율적인 재정 운영

◦ 주민편익 제공을 위한 요천생태습지공원 시설 보강 및 애견놀이터 연장운영

□ 하수관로 정비 및 차집관로 성능개선으로 불명수 차단

◦ 강우시 유량급증, 동절기 하수온도 저하등 합류식 관로의 취약점 해결

◦ 차집관로의 주기적인 준설과 구조개선으로 불명수 차단

◦ 농촌지역 주거환경 개선 및 개인하수처리시설 설치비 부담경감

□ 마을하수처리장 시설개선 및 관리강화로 안정적 운영

◦ 공정의 추가, 고장․노후시설의 수리 등 시설의 보수 및 개선

◦ 운영관리를 민간 위탁하여 마을하수도 적정관리

◦ 농촌지역 쾌적한 생활환경 조성 및 소하천 수질개선 기여

	아쉬운 점
◦ 2021년도 하수관로 관련 사업완료를 위해 추가예산확보 필요(11,868백만원) [차집 : 6,682백만원(국 2,896 시 3,786) / 2단계 : 5,186백만원(국 2,278 시 2,908)] □ 추가예산 미확보시 사업기간 연장 (2021년 → 2022년)

2021년 중점 추진방향

안정적 생활하수처리 및 효율적 공기업 운영

	중 점 추 진 과 제
◦ 친환경 하수관리로 청정 수질 보전 - 하수도시설 지속적인 확충 및 유지관리 - 강우시 안정된 하수 수집·이송·처리능력 확보 - 효율적 하수도 서비스로 시민불편 해소 ◦ 완벽한 생활하수처리 - 방류수 수질기준준수 (64개소) - 남원·운봉·인월·소규모 하수처리장 안정적 운영관리 ◦ 공기업 특별회계 효율적 운영 - 지방공기업(하수도) 경영평가를 통한 효율적인 운영 - 투명하고 효율적인 공기업특별회계 운영 및 공개

2021년 주요업무 계획

하수도 수해복구사업 추진

(신규사업)

□ 개    요

◦ 대    상 : 14개소 (소규모 마을하수처리시설 8개소, 하수관로 6개소)

◦ 복구사업비 : 4,784백만원 (전액국비)

◦ 복구개요

구 분	위 치	복구금액 (백만원)	비고
계	14개소	4,784
소규모 마을하수 처리시설	8개소 (백일,송내,사석,상귀,세전,입암,서만,호곡)	3,608
하수관로	6개소 (주촌천,원천천,광치천,옥률천,장포천,금강마을)	1,176

◦ 복구기간 : 2020. 08. 15. ~ 2021. 06. 30.

◦ 사업내용

▷ 소규모 마을하수 처리시설 : 처리장 개량복구(기계,전기,토목,건축 등)

▷ 하수관로 : 하천내 차집관로 및 하수관로 원상복구 L=3.2km

□ 추진계획

◦ 소규모 마을하수처리시설(8개소) 공사발주            : 2020. 12월

◦ 하수관로 실시설계용역 완료                        : 2021. 1월

◦ 하수관로 공사발주                                 : 2021. 2월

◦ 전체사업 완료                                      : 2021. 6월

□ 기대효과

◦ 하수도시설 (소규모 마을하수처리시설, 하수관로) 수해복구로 안정적하수도 운영관리

남원처리구역 하수관로 확장사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 일원 (9개 마을)

- 화정동, 신정동, 화정(한우물), 주생(부동,중동,상동,대지,소지 등)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=16.2km, 배수설비 730여 가구

◦ 총사업비 : 17,270백만원(국비 12,089, 시비 5,181)

※ 2021년 사업비 : 714백만원 (국비 500 시비 214)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년 (4개년)

□ 추진계획

◦ 실시설계 완료	: 2021. 5월

◦ 환경부 재원협의 및 행정절차 이행	: 2021. 6월

◦ 공사착공	: 2021. 7월

◦ 전체사업 완료	: 2024. 12월

□ 기대효과

◦ 주생면 본 처리장 주변에 위치해 있으나 하수관로가 미연결된 지역에 대한 사업추진으로 처리장 주변마을 환경개선 및 깨끗한 하천수질 보전

◦ 개인정화조 폐쇄에 따른 악취개선 및 주민 하수도 복지에 기여

아영 인풍지구 하수관로 정비사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 아영면, 인월면 일원 (12개 마을)

- 아영(봉대,외인,내인,매산,서갈,동갈), 인월(덕실,연실,자래,외건,내건,지산)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=15.4km, 배수설비 450여 가구

◦ 총사업비 : 16,000백만원(국비 11,200, 시비 4,800)

※ 2021년 사업비 : 714백만원 (국비 500 시비 214)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년 (4개년)

□ 추진계획

◦ 실시설계 완료	: 2021. 5월

◦ 환경부 재원협의 및 행정절차 이행	: 2021. 6월

◦ 공사착공	: 2021. 7월

◦ 전체사업 완료	: 2024. 12월

□ 기대효과

◦ 인월, 아영면 주변마을의 하수관로 설치에 따른 환경개선 및 깨끗한 하천수질 보전

◦ 기존 운영중인 소규모 처리장(자래)을 폐쇄하고 관로연결을 통한 인월처리장 연계처리로 처리장 운영 효율 향상

◦ 개인정화조 폐쇄에 따른 악취개선 및 주민 하수도 복지에 기여

산내지구 하수관로 정비사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산내면 일원 (5개 마을)

- 산내면(상황, 중황, 하황, 중기, 삼화)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=6.6km, 배수설비 280여 가구

◦ 총사업비 : 6,500백만원(국비 4,550 시비 1,950)

※ 2021년 사업비 : 358백만원 (국비 250 시비 108)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년 (2개년)

□ 추진계획

◦ 실시설계 완료	: 2021. 5월

◦ 환경부 재원협의 및 행정절차 이행	: 2021. 6월

◦ 공사착공	: 2021. 7월

◦ 전체사업 완료	: 2024. 12월

□ 기대효과

◦ 기처리 된 소규모 마을 하수처리장(백일, 대정)으로 연계처리함으로써 하수처리 효율개선

◦ 산내면 주변마을의 하수관로 설치에 따른 환경개선 및 깨끗한 하천수질 보전

◦ 개인정화조 폐쇄에 따른 악취개선 및 주민 하수도 복지에 기여

요천생태습지공원 관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2021. 12월(연중)

◦ 총사업비 : 301백만원

◦ 관리인력 : 2명(환경관리원 1, 기간제 1), 공공근로 상시배치

◦ 사업내용 : 화단 조성, 잔디식재, 쉼터조성, 애견놀이터 운영

□ 추진실적

◦ 시민 휴식 공간 설치 및 정비

- 모정 2개소, 그네벤치 2개소, 회랑 10개소(다래넝쿨 120주)

- 조경수 식재(백합나무 60주), 잔디식재(1,834㎡)
- 수목 관리(전정, 퇴비살포), 제초작업(4회), 화장실 보수(2개소)

◦ 애견놀이터 운영관리

- 연장운영(06:00 ~ 21:00)	: 3월 ~ 10월

- 대형파라솔 설치(2개소), 청결관리(방역, 배변수거, 잡초제거 등)

□ 금후계획

◦ 수목 관리 및 식재	: 2021. 2월 ~ 6월

- 전정 및 제초작업, 화단 조성, 고사목 제거 및 잔디보식 등

◦ 습지부 정비(준설, 분수 및 수차, 안전울타리 설치 등) : 2021. 2월 ~ 5월

◦ 시설물 정비 및 관리	: 2021. 2월 ~ 5월

- 모정, 파라솔, 배수로 정비 및 쉼터조성 등

◦ 애견놀이터 운영관리	: 연중

- 연장운영(08:00 ~ 21:00)	: 3월 ~ 10월

- 시설물 정비(파고라 및 벤치 도색, 가로등 보수 등)

남원하수처리장 운영 및 시설개선

(계속사업)

□ 개    요

◦ 시설용량 : 50,000톤/일, 처리공법 : Symbio공법

◦ 처리개요 : 생활하수, 분뇨, 침출수 및 음식물류 폐기물의 병합처리

◦ 수질관리항목 : 총 6항목 (BOD, COD, SS, T-N, T-P, 총대장균군수)

◦ 슬러지 처리 : 탄화처리 (처리시설 민간위탁 관리)

□ 추진실적

◦ 철저한 수질관리로 방류수질기준 준수

(단위 : ㎎/L, 개)
항목 구분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수	비고
유입수	127.5	83.4	133.7	28.902	3.234	98,757
방류수 / 기준	1.8 / 5	7.8 / 20	3.4 / 10	11.986 / 20	0.064 / 0.3	37 / 1,000

※ 하수도법 개정으로 인한 TOC항목의 방류수질 추가로 현재 TOC분석기 운영

◦ 수질관리를 위한 처리시설 정비 및 개선

▷ 노후 제어반·계측기기 교체, 농축기 개선공사

◦ 음식물 병합처리 : 음식물류 폐기물 19.3톤/일(총 5,585.1톤) 처리

□ 금후계획

◦ 정기적인 실험분석 및 운영시스템 모니터링으로 방류수질 기준준수

▷ 실험 데이터를 통한 운영시스템 관리로 최적의 수질관리 시스템 구축

▷ 방류수 수질 상시 모니터링 : TMS

◦ 시설물 점검·정비, 개선으로 안정적인 처리시설 운영

▷ 처리시설 점검(매주), 구조물 안전점검(년2회), 시설정비(상시)

▷ 원심탈수기 설치사업 / 600백만원	: 2021. 1월 ~ 6월

◦ 노후 시설물 일제 정비·개선 추진

▷ 환경부 2022년 스마트 하수처리장 국비보조사업 신청 : 2021. 3월

(사업비 40억 / 국비 20억, 도비 10억, 시비 10억)

강우시 하수관리 시범사업

(계속사업)

□ 개    요

구 분		차집관로 정비사업		남원(2단계) 하수관로 정비사업
위 치		➢ 남원시 일원 (8개하천)		➢ 남원시 일원 (6개지역)
사 업 량		➢ 차집관로 정비 L=31km		➢ 하수관로 정비 L=57km ➢ 배수설비 3,620여 가구
총사업비		➢ 41,974백만원(국27,937, 시14,037) ➢ 기투자 : 33,370‘21년 : 1,922		➢ 34,477백만원(국24,099, 시10,378) ➢ 기투자 : 24,626‘21년 : 4,665
사업기간		➢ 2018~2021		➢ 2018~2021

□ 추진실적

◦ 시범사업 대상 선정	: 2015. 2월

◦ 한국환경공단 위·수탁 협약 체결	: 2015. 3월

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: 2015. 6월 ~ 2018. 8월

◦ 공사추진	: 2018. 10월 ~

▷ 현장 및 민원관리를 위해 매주1회 회의시행(한국환경공단, 시공사)

▷ 현장관리(안내간판, 안전시설물 점검)를 위해 매주1회 합동현장점검 시행

◦ 공 정 율 : 차집관로 70% , 2단계 71%      : 2020. 12월 현재

(차집:31km 중 21km완료, 2단계:57km중 48km완료, 배수설비 3,620가구 중 2,723가구 완료)

□ 금후계획

◦ 시공 및 현장 안전관리(안내간판, 안전휀스 등) 철저      : 연중

▷ 정기적으로 시공 및 안전점검 회의 실시(한국환경공단, 시공사 등) : 매주

◦ 시민 불편 민원사항 즉시 처리                          : 연중

◦ 전체사업 완료                                       : 2021. 12월

노후 하수관로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 일원 (시청주변 - 도통택지 1지구)

◦ 사업내용 : 노후 하수관로 정비 L=6.9km, 배수설비 300여 가구

◦ 총사업비 : 8,448백만원(국비 3,224, 시비 5,224)

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: 2017. 2월 ~ 2017. 11월

◦ 환경부 재원협의 등 행정절차 이행	: 2018. 5월 ~ 2019. 7월

◦ 공사추진	: 2019. 12월 ~

◦ 공 정 율 : 93%	: 2020. 12월 현재

(하수관로 6.9km 중 5.8km완료, 배수설비 300가구 중 260가구 완료)

□ 금후계획

◦ 시공 및 현장안전관리(안내간판, 안전휀스 등) 철저        : 연중

▷ 정기적으로 시공 및 안전점검 회의 실시(감리단, 시공사 등) : 매주

◦ 시민 불편 민원사항 즉시 처리                          : 연중

◦ 전체사업 완료                                         : 2021. 4월

남원(3단계)하수관로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원처리구역 및 운봉처리구역

◦ 사업내용

- 남원처리구역 : 오수관로 설치 L=31.7km, 배수설비 1,763가구

- 운봉처리구역 : 오수관로 설치 및 개량 L=15.2km

◦ 사 업 비 : 37,818백만원(국비 22,128, 시비 15,690)

※ 2021년 사업비 : 16,328백만원(국비 16,328 시비  - )

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

□ 추진실적

◦ 2018년 신규사업지구로 확정 내시	: 2017. 11월

◦ 기본 및 실시설계 용역시행	: 2017. 11월 ~ 2019. 3월

◦ 공사추진                                 : 2020. 2월 ~

▷ 현장 및 민원관리를 위해 매주1회 회의시행(감리단, 시공사)

▷ 현장관리(안내간판, 안전시설물 점검)를 위해 매주1회 합동현장점검 시행

◦ 공 정 율 : 22%	: 2020. 12월 현재

(하수관로 31.7km 중 16.1km완료, 배수설비 1,763가구 중 266가구 완료)

□ 금후계획

◦ 시공 및 현장안전관리(안내간판, 안전휀스 등) 철저       : 연중

▷ 정기적으로 시공 및 안전점검 회의 실시(감리단, 시공사 등)  : 매주

◦ 시민 불편 민원사항 즉시 처리                          : 연중

◦ 전체사업 완료                                        : 2022. 12월

소규모 마을하수처리시설 개량사업

(계속사업)

1. 방촌 소규모 마을하수처리시설 개량사업

□ 사업개요

◦ 소 재 지 : 금지면 방촌리 1272-1 (처리구역 : 방촌)

◦ 사 업 비 : 1,288백만원(국 386, 시 902)

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년 / 처리용량 50㎥/일

□ 추진실적 및 금후계획

◦ 기본 및 실시설계 착수	: 2019. 2월

◦ 공법선정	: 2020. 5월

◦ 변경인가(전라북도) 및 재원협의(환경부)	: 2020. 11월

◦ 공사착공	: 2020. 12월

◦ 공사준공	: 2021. 12월

2. 비전 소규모 마을하수처리시설 개량사업

□ 사업개요

◦ 소 재 지 : 운봉읍 화수리 213-1 [처리구역 : 비전, 전촌, 군화동]

◦ 사 업 비 : 600백만원(국 180, 시 420) ⇒ 재원협의시 변경

◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2021년 / 처리용량 : 60㎥/일

□ 추진실적 및 금후계획

◦ 기본 및 실시설계 착수	: 2020. 4월

◦ 하수도정비 기본계획 부분변경 신청(환경부)	: 2020. 5월

◦ 공법선정	: 2021. 1월

◦ 변경인가(전라북도) 및 재원협의(환경부)	: 2021. 4월

◦ 공사착공	: 2021. 9월

운봉·인월·소규모 하수도시설 운영관리

(계속사업)

□ 현    황

◦ 대    상 : 공공하수도시설 114개소

- 공공하수처리장(500㎥이상) : 2개소

- 소규모 공공하수처리장(500㎥이하) : 61개소

- 중계펌프장 : 51개소

□ 추진실적

◦ 기술진단(운봉 등 14개소, 247백만원)	: 2020. 3월 ~ 12월

◦ 소규모 하수처리시설 미세목 자동스크린 설치	: 2020. 4월 ~ 8월

- 3개소(고촌,매요,장교), 92백만원

◦ 소규모 하수처리시설 자동제어 교체(8개소)	: 2020. 07. 21

◦ 2020년도 관리대행 실시(1,629백만원)	: 2020. 1월 ~ 12월

□ 금후계획

◦ 기술진단(3개소/부절·송기·고촌, 32백만원)	: 2021. 1월 ~ 6월

◦ 막분리공법 평막 교체(4개소, 96백만원)	: 2021. 1월 ~ 6월

◦ 자동 제어반 교체(11개소, 170백만원)	: 2021. 1월 ~ 6월

◦ 운봉,인월 시설물 정기점검	: 2021. 상·하반기

◦ 소규모 하수처리시설 내진 성능평가(61개소, 441백만원)	: 2021. 1월 ~ 11월

◦ 폐쇄 처리시설 철거(2개소/원천·용전, 130백만원)	: 2021. 1월 ~ 10월

◦ 2021년도 관리대행 실시(1,692백만원)	: 2021. 1월 ~ 12월

◦ 2020년도 관리대행 성과평가	: 2021. 1월 ~ 2월

- 근무년수, 방류수 수질기준 준수, 재해발생 빈도 등 평가

- 향후 관리대행업자 선정시 가․감점(±1점) 부여 등 반영