상수도사업소

운봉 제2배수지 및 송·배수관로 설치공사

【신규】

□ 필 요 성

◦운봉배수지 계통 농어촌생활용수 개발사업 지구 및 자연방사성물질       검출지구의 광역상수도 확대 공급 및 산내면 급수지역 확대에 따른       상수도 공급량 부족으로 제2배수지 신설 필요

◦신설 배수지 설치에 따른 급수체계 개선으로 효율적인 급수 공급

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 아영면, 산내면 일원

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2025년(4개년)

◦ 사업내용

- 배 수 지 : 신설 1개소(V=1,400㎥) / 아영면 당동마을(20억원)

- 송수관로 : L=12.1km(D250mm) / 동화댐 수자원공사관로 분기(50억원)

- 가 압 장 : 3개소 Q=2,630㎥/일 / 만항, 구선, 사치(6억원)

- 배수관로 : L=24.4km(D80~250mm) / 아영신설 배수지~산내면(64억원)

◦ 총사업비 : 140억원(도비 98, 시비 42)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	140	0.00	0.00	13	127
도 비	98	-	-	9.1	88.9
시 비	42	-	-	3.9	38.1

□ 추진상황

◦ 남원시 수도정비기본계획(변경 수립)                : ‘17. 1.

- 운봉배수지계통 아영배수지 신설 및 배수관로 계획 반영

□ 금후계획

◦ 기본 및 실시설계                                 :‘22. 1. ~ 6.

◦ 배수지 및 송·배수관로 설치공사 시행                       :‘23. 1. ~ ‘25. 12.

월락정수장 태양광발전설비 설치

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦기후변화협약에 따른 온실가스 감축 및 미래 신성장동력산업으로서       지속가능에너지시스템을 구축하며, 전기요금 절감효과가 있어 장기적      으로 볼 때 투자 비용대비 효과가 클 것으로 기대됨

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도통동 555번지 (월락정수장)

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2023년 (2개년)

◦ 사업내용 : 태양광 발전설비 설치 200kW

◦ 총사업비 : 7억원(국비 3.5, 시비 3.5)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	7.00	0.00	0.00	3.50	3.50
국 비	3.50	-	-	1.75	1.75
시 비	3.50	-	-	1.75	1.75

□ 추진상황

◦ 국가예산확보 전북도 출장                             :‘21. 2.

◦ 환경부 사업계획서 제출(환경 기초시설 탄소중립프로그램)       :‘21. 3.

□ 금후계획

◦ 태양광발전설비 설치공사 실시설계용역         :‘22. 1. ~ 6.

◦ 태양광발전설비 설치공사                      :‘22. 7. ~ ‘23. 11.

남원시 노후 상수관망 정비 사업

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦ 노후 상수관을 정비하여 시민들에게 맑고 깨끗한 상수도를 안정적으로 공급하고 누수 · 적수 발생 등 생활민원 사전 예방 및 유수율 제고로 안전한 상수관망 구축이 필요

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동지역 급수구역

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2023(2개년)

◦ 사업내용 : 노후 상수관(송·배수관)

- 송수관 L=0.55㎞, 배수관 L=5.0㎞

◦ 총사업비 : 20억원(국비 10, 시비 10)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	20.00	-	-	10.00	10.00
국 비	10.00	-	-	5.0	5.0
시 비	10.00	-	-	5.0	5.0

□ 추진상황

◦ 노후 상수관로 정비 기본계획용역 추진	: `20. 3. ~ `21. 6.

- 한국수자원공사 위탁 시행(`20. 3.) / 용역비 1.4억원(국비70%)

- 기본계획용역 결과에 따른 환경부 출장 및 국가예산반영 협의(`21. 2.)

◦ 국가예산확보 전북도 출장	: `21. 2. 18.

□ 금후계획

◦ 환경부 협의에 따른 사업물량 및 사업비 확정    : `21. 7. ~ 12.

◦ 사업 추진	: `22. 1. ~ `23. 12.

마을상수도 비상자동정지 및 문자알림사업

【균특, 신규】

□ 필 요 성

◦ 안정적이고 맑고 깨끗한 생활용수를 공급하여 주거복지향상에 기여    ◦ 마을상수도의 지속적이고 안정적인 수질관리 필요

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 관내(마을상수도 설치지역)

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2023(2개년)

◦ 사업내용 : 마을상수도 52개소(비상자동정지 및 문자알림 장치 설치)

◦ 총사업비 : 1.3억원(국비0.91억원, 시비0.39억원)

- 산출근거 : 마을상수도 52개소 x 2,500천원: 약 130백만원

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	1.30	0.00	0.00	0.70	0.60
국 비	0.91	-	-	0.50	0.41
도 비	0.00	-	-	-	-
시 비	0.39	-	-	0.20	0.19
기 타	0.00	-	-	-	-

□ 추진상황

◦ 비상자동정지(문자알림장치) 시범설치 운영 2개소(‘21. 3월기준)

- 왕정동 시목동, 상정마을

□ 금후계획

◦ 2022년 균특이양사업 수요조사시 적극적으로 예산확보 추진하겠음.

월락정수장 현대화 전면 개량사업

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦ 월락정수장은 1975년 준공되어 약 45년이 경과된 노후시설로 시설개량이        시급한 실정임

◦ 양질의 생활용수를 안정적으로 공급하여 주민생활 향상 도모를 위해       정수장 전면 개량사업 필요

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도통동 555번지 일원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2023년(5개년)

◦ 사업내용 : 정수장 시설 전면개량 Q=15,000톤/일

◦ 총사업비 : 325억원(국비 162.5, 도비 32.5, 시비 130)

구 분	총 계	기투자	2021	2022이후
계	32,500	12,172	10,554	9,774
국 비	16,250	6,086	5,277	4,887
도 비	3,250	1,217	1,055	978
시 비	13,000	4,869	4,222	3,909

□ 추진상황

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행           :‘16. 12. 23. ~ ‘19. 11. 13.

◦ 건설사업관리용역 및 공사 착수        :‘19. 12. 4.

◦ 월락정수장 개량사업 1차분 준공       :‘20. 4.

◦ 월락정수장 개량사업 2차분 착공       :‘20. 5.

⇒ ‘21년 3월 현재 사업진도 : 전체공정 30%

□ 금후계획

◦ 정수지 준공 및 시운전(여과지·정수지)           : ‘21. 8.

◦ 전체공사 준공                                  : ‘23. 11.

스마트 관망관리 인프라 구축사업

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦ ICT를 활용한 실시간 수질감시 및 관리를 통해 이물질 등을 상수관 내에서 제거 및 수돗물 오염을 차단하여 수질사고 예방, 수질안정성 확보 필요

◦ 관망 수질 변화를 통합관제시스템과 연계하여 수질사고 발생 시 인지시간 단축 및 오염물질 거동을 예측하여 2차사고 발생 방지 필요

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수구역

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2022(2개년)

◦ 사업내용 : 정밀여과장치, 스마트 미터링, 소규모 유량·수압감시 시스템, 다항목 수질 계측, 자동 드레인 설비, 재염소 투입 설비 등

◦ 총사업비 : 51.6억원(국비 36.1, 시비 15.5)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	51.60	0.00	31.20	20.40	0.00
국 비	36.10	-	21.8	14.3	-
시 비	15.50	-	9.4	6.1	-

□ 추진상황

◦ 스마트 관망관리 기본계획 수립 용역 추진(환경부)	: `20. 1. ~ `21. 2.

◦ 2021년 환경부 상수도 국고보조사업 예산 확정 내시	: `20. 12. 21.

◦ 기본계획 확정 통보(전체 사업계획 확정)	: `21.  2.  1.

◦ 국가예산확보 전북도 출장	: `21.  2. 18.

◦ 실시설계용역 발주	: `21.  2. 25.

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 추진	: `21. 4. ~ 7.

◦ 사업 추진	: `21. 6. ~ `2