문 화 예 술 과

남원 미술 에듀센터 실감콘텐츠 제작 사업

【신규】

□ 필 요 성

◦ 남원시립김병종미술관 에듀센터 외벽에 대형 LED 사이니지를 설치,

미술관 소장품을 응용한 영상 작품 제작 및 재생

◦ 시각문화예술의 디지털 서비스 제공으로 관람객 만족도 제고

LED 사이니지 설치 예상도	디지털 전시관(VR 체험실) 예상도

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 함파우길 65-14

◦ 사업기간 : 2022년 1~12월

◦ 사업내용 : 에듀센터 외벽 LED 디지털 사이니지 설치, 디지털전시관 구축

◦ 총사업비 :  10억원(국비 5, 시비 5)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
국 비	5.00			5
시 비	5.00			5

□ 추진상황 및 금후계획

◦ 국립중앙박물관 방문 및 실감콘텐츠 전시 자문        :‘21. 2. 26.

◦ 공립미술관 실감콘텐츠 제작 및 활용사업 공모             :‘22. 1월

◦ LED 사이니지 및 디지털 전시 컨텐츠 제작 및 설치        :‘22. 8월한

문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감

【기금, 신규】

□ 필 요 성

◦ 민간 예술단체 우수공연 프로그램 유치에 공모하여 시민에게 다양한 문화

예술프로그램을 제공함으로써 문화향유권 신장 및 문화 격차 해소

◦ 작품성 및 대중성 등에서 검증된 우수 공연프로그램을 유치하여 지역문화

예술 수준 제고 및 문화예술회관 운영 활성화

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원춘향문화예술회관

◦ 사업기간 : 2022. 3. ~ 12.

◦ 사업내용 : 민간 예술단체 우수공연 프로그램 유치

◦ 총사업비 : 1억원(국비 6, 시비 4)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	8.17	5.27	0.90	1.00	1.00
국 비	5.43	3.69	0.54	0.6	0.6
도 비	0.00
시 비	2.74	1.58	0.36	0.4	0.4
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 2015~2020년 방방곡곡 문화공감 우수문화예술 공연 유치 공모 선정

- 공연 17회/ 사업비 5.27억원(국 3.69, 시비1.58)

◦ 2021년도 공모선정(2021. 3.) : 3개공연, 0.9억원(국 0.54 시 0.36)

- 뮤지컬팝스오케스트라와 함께하는 뮤지컬 3DIVA 콘서트, 뮤지컬 이상한

나라의 앨리스, 발레 나의 어린왕자 이야기

□ 금후계획

◦ 2022년 공모사업 신청 : 2022. 2월중

한옥자원활용 야간상설공연

【기금, 신규】

□ 필 요 성

◦ 지역의 문화역사자원을 활용한 지속적인 공연 예술화 작업 및 활성화    ◦ 2013년부터 시행된 사업으로 남원시 대표 야간상설공연으로 자리매김

□ 개    요

◦ 위    치 : 안숙선 명창의 여정

◦ 사업기간 : 2022. 5. ~ 9. (5개월)

◦ 사업내용 : 창극 공연 1식

◦ 총사업비 : 2.5억원(국비 1.0, 도비 0.3, 시비 1.2 )

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	28.47	20.97	2.50	2.50	2.50
국 비	12.47	9.47	1.0	1.0	1.0
도 비	4.20	3.3	0.3	0.3	0.3
시 비	11.80	8.2	1.2	1.2	1.2
기 타	0.00	-	-	-	-

□ 추진상황

◦ 2013 ~ 2020년 한옥자원활용 야간상설공연 8년 연속 공모사업 선정

- 184회 공연 / 56,157명 관람(2013 ~ 2020년)

◦ 2021년도 공모선정(2020. 12.)으로 2021. 5월부터 사업 추진 예정

- 열녀춘향 수절가

□ 금후계획

◦ 2021. 5. ~ 9. 공연추진 / 안숙선명창의여정

◦ 공모사업 신청 및 선정                      : ‘22. 9월 중

만복사지 고증연구 및 디지털콘텐츠 개발

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦ 기존 연구결과 등을 볼 때 고려시대 창건된 것으로 판단하고 있으나 다수의 통일신라시기 유물들이 확인되고 있어 명확한 역사성 확인을 위해 시․발굴조사가 필요

◦ 만복사지의 가치성에 비해 설명과 안내시스템이 부족한 상황으로 유구훼손 없이 디지털 기술을 활용한 탐방안내시스템 구축 시급

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 왕정동 489번지 일원

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

◦ 사업내용 : 발굴조사, 고증연구를 통한 문화유산 디지털 기록화, 교육콘텐츠(AR/VR/MR 등) 개발 및 보급

◦ 총사업비 : 20억원(국비 14, 도비 3, 시비 3)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	20.00	0.00	0.00	5.00	15.00
국 비	14.00			3.5	10.5
도 비	3.00			0.75	2.25
시 비	3.00			0.75	2.25

□ 추진상황

◦ 만복사지 사적 지정	: 1991. 3. 29.

◦ 미발굴지 토지매입 및 발굴조사, 유구정비	: 2011 ~ 2016

◦ 화장실 신축, 정비계획 수립, 방재시스템 구축	: 2017 ~ 2019

□ 금후계획

◦ 발굴조사 및 탐방시스템 구축 등	: 2022 ~

남원읍성 복원정비

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦ 사적 제298호 남원읍성은 정유재란 당시 왜적에 대응해 대규모 항전이 이루어졌던 곳으로 문화재 복원정비를 통한 문화유산 계승 및 활용 기대

◦ 지속적이고 체계적인 남원읍성 복원정비로 유적의 보호와 시민을 위한 역사문화 교육의 장 마련

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충동 364-1번지 일원

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2025년

◦ 사업내용 : 남원읍성 복원 정비(발굴조사, 토지매입, 정비)

◦ 총사업비 : 330억원(국비 231, 도비 49.5, 시비 49.5)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	330.00	79.10	14.50	20.00	216.40
국 비	231.00	55.37	10.15	14	151.48
도 비	49.50	11.87	2.17	3	32.46
시 비	49.50	11.86	2.18	3	32.46

□ 추진상황

◦ 광복 70주년 일제강점기 문화재 복원 프로젝트 선정	: ΄15. 8. 15.

◦ 사적 추가지정 확정고시 (65필지/25,375㎡)	: 2015~2021

◦ 3차 사적 추가지정 구역 토지매입 추진중	: `19.  7. ~

◦ 남원읍성 현황조사 및 정비계획 수립 용역 추진중	: `20.  5. ~

□ 금후계획

◦ 토지매입 구간 건축물 철거, 시․발굴조사, 잔디식재, 디지털 기술활용 연구 용역 추진

유곡리와 두락리 가야고분 종합정비

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦ 유곡리와 두락리 고분군은 학술적 가치를 인정받음에 따라 세계유산등재 대상에 선정된 중요 유적으로 고분군의 보존 및 활용대책을 강구하기 위한 기초단계로 유적정비 사업이 필수 임

□ 개    요

◦ 위    치 : 인월면 유곡리, 아영면 두락리 일원 / 98,225㎡

◦ 사업기간 : 2019~2028(10년)

◦ 사업내용 : 고분군 발굴조사 및 정비사업

◦ 총사업비 : 224.1억원(국비 68.68, 도비 72.65, 시비 82.77)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	224.10	56.92	1.80	10.00	155.38
국 비	68.68	14.67	1.2	7	45.81
도 비	72.65	17.38	0.3	1.5	53.47
시 비	82.77	24.87	0.3	1.5	56.1

□ 추진상황

◦ 유곡리와 두락리 고분군 사적 제542호 지정	: 2018. 3.28.

◦ 가야고분군 세계유산 등재 추진대상 선정	: 2018. 5.14.

◦ 유네스코 세계유산 등재신청서 완성도 검토 통과	: 2021. 3. 1.

□ 금후계획

◦ 문화재구역 미매입 토지부분 수용 절차 이행

◦ 고분군 경관조성을 위한 수목, 민묘, 경작지 시설물 등 정비 추진

지역문화재 활용사업(문화재 야행, 생생문화재)

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦ 지역 문화재에 내재된 역사적 의미와 가치를 지역의 인적‧물적 자원과 결합하여 교육, 공연, 체험 등 지역주민에게 문화 향유 기회를 제공

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2022년

◦ 사업내용

(1) 문화재 야행사업 : 야간에 특화된 문화체험 프로그램 제공

(2) 생생문화재 사업 : 문화 콘텐츠와 연계 문화체험 프로그램 제공

◦ 총사업비 : 4억(국비 1.6, 도비 0.72, 시비 1.68)

- 문화재 야행사업(3억), 생생문화재 사업(1억원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	6.65	0.00	2.65	4.00	0.00
국 비	2.66		1.06	1.6
도 비	1.20		0.477	0.72
시 비	2.79		1.113	1.68
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 문화재청 및 전북도 출장 : 3. 4. / 3. 9.

- 2022년 공모사업 선정 건의 등 사전 협의

□ 금후계획

◦ 문화재청 공모 심사기준에 맞춰 프로그램 구성 등 공모 사전 준비

- 2021. 7월 공모 신청예정

세대어울림 복합형 공공도서관 건립

【균특, 신규】

□ 필 요 성

◦ 세대가 공감하고 지역주민의 행복과 삶의 기반이 되는 문화시설 확충

◦ 시민들의 정보이용, 독서(문화) 활동 및 평생교육을 통해 삶의 만족도 증대

□ 개    요

◦ 위    치 : 금동 343-8 외 1필지 (남원초 도로변)

◦ 사업기간 : 2021. ~ 2023년

◦ 사업내용 : 복합형공공도서관 건립 3,000㎡ (공공도서관·생활문화센터)

◦ 총사업비 : 118억원 (균특 59, 시비 59)

※ 2021년 시비 9억 추경 확보 예정

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	118.00	0.00	18.00	50.00	50.00
국 비	59.00		9	25	25
시 비	59.00		9	25	25

□ 추진상황

◦ 복합형 공공도서관 기본 및 타당성 연구용역        : ‘20.  4. ~ 10.

◦ 복합형 공공도서관(생활SOC복합화) 사업 신청(선정) : ‘20.  4. (9월)

◦ 중기지방재정계획 및 재정투자심사 (도)             : ‘20. 11.

◦ 공유재산 관리계획 심의 (의회)                     : ‘20. 12.

□ 금후계획

◦ 공공건축계획 사전검토 (건축공간연구원)            : ‘21.  3.

◦ 남원초 도시계획 시설 변경 (학교→도서관)          : ‘21.  3.

◦ 토지 교환·매매 계약 체결(남원시↔도교육청), 공부 정리 등  : ‘21.  4.

◦ 기본조사 및 실시설계 용역                         : ‘21.  6.