2021년도 제3차 수시분 공유재산 관리계획안

의안 번호			제출년월일 : 제 출 자 : 제안설명자 :	2021. 05. . 남 원 시 장 자치행정국장

1. 제안이유

❍ < 남원 청년메이커스 신축 변경안 >

남원시 맞춤형 청년 창업을 위해 신축하는 인큐베이팅 시설의

활용성 확대를 위하여 주차공간 확보, 인근 주민 편익 등을 고려

인접 토지를 추가 매입하고자 함.

(기획실)

❍ < 오리정·버선밭 연계 관광지화 사업 >

오리정 및 버선밭 주변에 테마공원 조성과 상징물 설치 등을 통해

광한루원과 함께 춘향전 관련 관광자원화 사업 추진을 위한 부지를

매입하고자 함.

(관광과)

2. 주요골자

❍ 취득하고자 하는 재산 –  14건      13,205㎡ ---   2,886,276천원

․ 토   지 :  10필지                 12,419㎡ ---    506,276천원

-	남원시 청년 메이커스 신축 (변경)	----	1필지	326㎡	120,000천원
-	오리정․버선밭 연계 관광지화 사업	----	9필지	12,093㎡	386,276천원

․ 건   물 :   4동                      786㎡ ---   2,380,000천원

-	남원시 청년 메이커스 신축 (변경)	----	4동	786㎡	2,380,000천원

❍ 처분하고자 하는 재산 – 3동             96㎡ ---      10,000천원

․ 건   물 : 3동                        96㎡ ---      10,000천원

-	남원시 청년 메이커스 신축 (변경)	----	3동	96㎡	10,000천원

3. 법적근거

◦ 공유재산 및 물품관리법 제10조 및 같은법 시행령 제7조

◦ 남원시 공유재산 관리조례 제12조

4. 금후계획

◦ 남원시의회 의결

◦ 공유재산의 취득 및 처분

남원시 청년 메이커스 신축에 따른

공유재산 관리계획 변경(안)

		필 요 성

◦ 인구감소지역 통합지원사업 공모 선정에 따라 남원시 맞춤형

청년 창업을 위한 인큐베이팅 시설을 조성하여 취‧창업 정보교류,   실습, 역량강화 등을 위한 청년 거점 공간 마련

		사업개요

◦ 사 업 명 : 남원 청년메이커스 신축 공사

◦ 위    치 : 남원시 동충동 47외 1필지

◦ 총사업비 : 2,500백만원(특교세 400, 시비 2,100)

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 4.

◦ 사업규모 : 대지 973㎡, 연면적 690㎡(지상3층)

		소요예산

◦ 소요예산 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

계	건축비	부지매입비	용역비(설계비 , 감리비 등)	철거 및 폐기물처리비	조경 및 포장, 담장설치
2,500	2,100	130	100	20	150

		변경사유

◦ 팝업스토어, 공유주방 등에 맞는 건물 설계와 넓은 주차공간 확보

◦ 방치된 폐가로 인한 위생 및 경관 저해 요인 제거

◦ 동충8통 경로당 통행로 개설을 위한 공간 확보(동충동 건의)

※ 사업비 변경내역

구분	취득구분	종류	수량	면적	소요액(천원)	증감
당초	신축	건물	1건	690㎡	1,753,000
변경	계		5건	1,112㎡	2,500,000	증747,000
	매입	토지및건물	4건	422㎡	130,000	증130,000
	신축	건물	1건	690㎡	2,370,000	증617,000

		추진현황

◦ 인구감소지역 통합지원 공모사업 선정	: 2020.06.19.

◦ 공공건축기획 심의 완료	: 2020.11.11.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수	: 2021.01.21.

◦ 공유재산관리계획 승인	: 2021.03.10.

		위 치 도

동충8통

경로당

추가매입

대상지

청년메이커스

신축부지

		현장사진

		금후계획

◦ 1회 추경 예산 확보	: 2021.07.

◦ 실시 설계 중간보고	: 2021.07.

◦ 공공건축 경관 심의	: 2021.07.

◦ 공사 계약(원가)심사 및 일상감사	: 2021.07.

◦ 설계용역 완료 및 공사 발주	: 2021.09.

◦ 운영 규정 마련 및 운영기관 선정 검토	: 2021.10.

◦ 공사완료, 각종 장비 및 물품 구입	: 2022.04.

◦ 시설 개관	: 2022.05.

오리정·버선밭 연계 관광지화사업

		필 요 성

◦ 오리정 및 버선밭은 대표적인 춘향전 관련 관광지이나 정비가 제대로 이루어지지 않아 관광객들이 찾지 않는 실정임.

◦ 주변에 상징물 설치와 테마공원 조성 등을 통해 춘향전의 대표적인 관광지로 조성 필요.

		사업개요

◦ 사 업 명 : 오리정·버선밭 연계 관광지화사업

◦ 위    치 : 사매면 관풍리 800-4번지 일원(오리정, 버선밭 인근)

◦ 총사업비 : 7,000백만원

◦ 사업내용 : 오리정 테마공원, 춘향 버선밭 조성, 주차장 등

◦ 면    적 : 12,093㎡

◦ 사업기간 : 2021. 01. ~ 2025. 12.

		소요예산

◦ 시설비(토지매입비) : 386백만원

		위 치 도

		현황사진

		금후계획

◦ 공유재산 관리계획 심의	: 2021. 05.

◦ 감정평가 및 보상 추진	: 2021. 07. ~ 12.