2021. 6.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

시정질문·5분발언 추진상황

기 업 지 원 과

목       차

□ 일    반    현    황

□ 2021년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 산업단지 기반시설 정비

◦ 기업별 경쟁력 강화 지원

◦ 활기차고 쾌적한 근로환경 조성

◦ 산업단지 근로자 행복주택 건립

◦ 산업단지 통근버스 임차 지원 사업

◦ 남원일반산업단지 산업용지 분양 추진

◦ 노암산업단지(3지구) 투자유치 마무리

◦ 재정지원으로 투자유치기업 경쟁력 강화

◦ 남원 일반산업단지 조성사업

◦ 남원 일반산업단지 국고지원 사업

□ 시정질문·5분발언 추진상황

◦ 남원시 경제정책 패러다임 전환

일  반  현  황

□ 기    구

									기업지원과장
									류 창
기업지원담당										투자유치담당														산단관리담당
진 경 재										김 승 원														박 봉 용
공장창업․설립 공장등록관리 산업단지입주 산업단지관리 중소기업육성 공공구매확대										기업유치 민간투자유치 투자기업지원 투자유치홍보														일반산업단지조성 산업단지개발계획추진 용지보상및수용재결 산업단지관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	13	1	3	5	2	2
현 원	12	1	6	2	-	3
증 감	△1	-	3	△3	△2	1

2021년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 중소기업 육성 기금 지원 : 7개업체 / 1,800백만원 - 이차보전 지원(2020 하반기분) : 53개업체 / 186백만원 ◦ 중소기업 환경개선 : 13개업체 / 312백만원 ◦ 기업 경쟁력 강화 및 근로자 복지 지원 - 박람회 참가지원 : 1개업체 / 2백만원 - 애향장려금 : 37명 / 37백만원, 전입정착금 : 432건 / 28.8백만원 ◦ 산업단지 기반시설 정비 : 10개사업 / 1,024백만원 ◦ 남원일반산업단지 투자협약 체결 : 5개기업/95,114㎡/287억원/160명 ◦ 일반산업단지 공공폐수처리시설 (2차분) 시행 : 1,065백만원 ◦ 하·폐수재이용 처리시설 기본 및 실시설계 용역 착수 : 119백만원

□ 활기찬 강소기업 육성·지원

◦ 기업육성기금 지원

- 중소기업 육성기금융자 지원	: 7개업체  / 1,800백만원

- 중소기업 육성기금 이차보전	: 53개업체 / 186백만원

- 중소기업 환경개선사업	: 13개업체 / 312백만원

- 국내․외 박람회 참가 지원	: 1개업체  / 2백만원

◦ 근로자 지원

- 애향장려금	: 37명 / 37백만원

- 전입정착금	: 432건 / 28.8백만원

◦ 산업단지 기반시설 정비	: 10개사업 / 1,024백만원

◦ 기업 애로 해소 : 시책설명회, 소통간담회, 기업 애로 상담실 운영

◦ 중소기업제품 공공구매 확대 : 640억원(물품:160, 공사:334, 용역:146)

□ 지역경제 활성화를 위한 기업유치 및 재정지원

◦ 노암산업단지(3지구) 분양률 : 96.5%(미분양 1개 블럭 협상 중)

◦ 일반산업단지 투자협약(2020~) : 27.8%(8개기업, 162,982㎡, 624억원, 297명)

- 기업 투자유치로 고용창출(인구증가) 및 지역경제 활성화 기여

◦ 투자기업 투자촉진보조금 지원(2020년) : 4개기업 / 57.24억원

- 인센티브(투자촉진보조금, 분양가지원) 확대로 투자기업 경쟁력 강화

□ 일반산업단지 조성사업 추진

◦ 일반산업단지 조성사업(1공구) 준공인가                : 740천㎡

◦ 공공폐수처리시설 설치사업 추진(Q=2,000㎥/일 중 1단계 400㎥/일) : 43억원

◦ 하·폐수 재이용 처리시설 설치사업 추진(Q=325㎥/일 중 1단계 65㎥/일) : 4억원

	하반기 추진방향
◦ 농공단지 시설 정비 - 노후농공단지 기반시설 정비로 근로여건 개선 - 기업하기 좋은 산업단지 복지시설 확충 ◦ 기업 경쟁력 강화 - 기업 경쟁력 확보를 위한 다양한 시책 지원 - 기업 간 경쟁력 강화를 위한 협업체계 구축 ◦ 근로복지 환경 조성 - 생산성 향상을 위한 쾌적한 근로환경 조성 - 맞춤형 기업애로 해소 및 현장소통 강화 ◦ 공격적인 기업유치활동 전개 및 경쟁력 확보를 위한 인센티브 확대 - 신성장 산업 유치를 위한 규정 개정, 관리계획 변경 등 규제완화 ◦ 산업단지 기반 구축 - 산업단지조성으로 산업 핵심성장 거점 확보 - 국고 지원사업 국비 예산확보 주력

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

산업단지 기반시설 정비

(계속사업)

□ 개    요

◦  사 업 명 : 노후 산업단지 기반시설 확충 및 시설 개선사업

◦  사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월

◦  사 업 비 : 1,177백만원 (국 112, 도 200, 시 865)

◦  사업내용 : 단지 내 도로, 상․하수도정비 및 가로등 정비, 기반시설 보강 등

□ 추진실적

단지명	사 업 명	사 업 내 용	사 업 비 (백만원)	추진상황 및 계획
계	10개 사업		1,024
어현	상수관로 매설공사	상수관로 413m 정비 터파기 V=315㎡ 되메우기 V=157㎥	(시)85	- 설계완료 (21. 5. 3.) - 착공 (21. 5. 24.)
	어현산업단지 진입로 수해복구공사	L형 측구(B:0.7m) : 117m 아스콘 포장(T=41㎝) : 124㎡ 절삭후덧씌우기 : 500㎡	(국)51	- 설계완료 (20. 11.) - 착공 (20. 12. 7.) - 준공 (21. 4. 5.)
노암	가압장 펌프교체 공사	가압장펌프교체	(시)8	- 착공 ( 21. 4. 21.) - 준공 ( 21. 5. 14.)
노암 2	사면 수해복구 공사	L형 측구(B:0.7m) : 62m 아스콘 포장(T=41㎝) : 124㎡	(국)61 (시)25	- 설계완료 (20. 12. 8.) - 착공 (21. 2. 4.) - 준공 (21. 5. 7.)
노암 1·2	노암1,2단지 배수로 정비공사	PC암거 68.0M / 횡배수관 3개소 맹암거 120M / 개거 15M	(시)190	- 설계완료 (21. 5. 3.) - 착공 (21. 5. 24.)
	노암1,2단지 도로 차선 도색공사	노암1,2단지 차선도색 A=64㎡	(시)3	- 착공 ( 21. 4. 7) - 준공 ( 21. 4. 22.)
노암3	사후환경영향조사	노암3단지 사후환경영향조사 1식 ※환경영향평가법제36조에 따른 입주율 70%도달하는 익년도에 실시해야하는 의무사항(2022년까지)	(시)98	- 용역 수행중 ( 21. 3. 24. ~ 22. 3. 18.)
	화장품지식산업센터 부지 사면 수해복구 공사	사면 복구 공사 L=50m	(시)50	- 예비비 사용승인 (21. 4. 23.) - 설계중 (21. 4. 30. ~ )
인월	사면보강 및 도로정비공사	사면보강 및 도로정비 L=150m	(도)200 (시)200	- 설계완료 (21. 5. 14.) - 착공예정 (21. 5.)
광치	암반지하수 배전함 이설	배전함 이설 공사	(시)53	- 착공 (21. 3. 11.) - 준공 (21. 3. 12.)

□ 금후계획

단지명	사 업 명	사 업 내 용	사 업 비 (백만원)	비고
계	2개 사업		153
공통	농공단지 환경정비	가로등 보수작업, 수목 정비 등 환경정비	53	(시)53
공통	노후 농공단지 기반시설 정비	노후화된 농공단지 시설 유지 보수를 위해 관정, 반사경, 도로파손 등 정비	100	(시)100

◦ 시설 공사 용역 발주	: 2021. 6.

◦ 공사 시행	: 2021. 6. ~ 11.

기업별 경쟁력 강화 지원

(계속사업)

□ 개    요

◦ 경영난 해소를 위한 중소기업 육성기금 융자지원

◦ 관내기업 청·장년층 근로자의 사기 진작을 위한 애향장려금 지급

◦ 근로자의 안정적인 가족 정착을 위한 전입정착금 지급

◦ 판로 및 마케팅 지원을 위한 공공구매 활성화 및 박람회 참가 지원

□ 추진실적

◦ 중소기업육성기금 : 7개 기업 / 1,800백만원 , 이차보전 53개 기업 / 186백만원

◦ 애향장려금 : 37명 / 37백만원

◦ 전입정착금 : 432건 / 28.8백만원

◦ 중소기업제품 공공구매 확대 : 640억원(물품:160, 공사:334, 용역:146)

◦ 박람회 참가 지원 : 1개업체 / 2백만원

□ 금후계획

◦ 중소기업육성기금 융자지원 (51.1억원)	: 2021. 홀수달

◦ 애향장려금 지급 (3명 / 3백만원)	: 2021. 8월

◦ 근로자 전입정착금(37.2백만원)	: 2021. 7. ~ 12.

◦ 박람회 참가 지원 (9개 기업 / 18백만원)	: 2021. 7. ~ 12.

◦ 농공단지 입주기업 물류비 지원 (198백만원)	: 2021. 7. ~ 12.

활기차고 쾌적한 근로환경 조성

(계속사업)

□ 개    요

◦ 쾌적한 근로환경 조성을 위한 중소기업 환경개선사업

◦ 중소기업 취업 촉진 및 중소기업의 만성적 인력난 해소를 위한 통근버스 운행

◦ 기업하기 좋은 환경 조성을 위한 기업후견인제 운영

◦ 직장내 인격 함양과 소통을 위한 근로자 역량강화교육

◦ 기업 애로 해소를 위한 현장 방문 소통 간담회 운영

◦ 근로자 주거지원을 위한 산업단지 근로자 행복주택 건립

□ 추진실적

◦ 중소기업 환경 개선사업 : 13개업체 312백만원

◦ 기업하기 좋은 환경개선을 위한 기업후견인제 운영  : 1회 303개업체

- 기업후견인 : 122명(5급이상 간부공무원 및 읍면동담당)

※건의 및 애로사항 : 104건(완료 75, 추진중 21, 검토 6, 유관기관 협의 2)

◦ 기업 애로 해소를 위한 현장 소통 간담 운영(수시) : 71회, 118개 업체

- 건의 및 애로사항 청취 및 반영 : 50건(반영 41, 추진중 2, 검토 7)

□ 금후계획

◦ 중소기업 환경개선(1개 업체 / 32백만원)	: 2021. 6.

◦ 근로자 역량강화교육(4회 / 800~900명)	: 2021. 8. ~ 9.

◦ 기업후견인제 운영 및 소통간담	: 분기별, 수시

산업단지 근로자 행복주택 건립

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 노암 산업단지 3지구 내 지원시설 용지(노암동 872-2)

◦ 면    적 : 3,752㎡(1,137평)

◦ 사업기간 : 2020∼2022(3년간)

◦ 사 업 량 : 120세대(21㎡-65세대, 36㎡-32세대, 44㎡-23세대)

- 입주대상 : 120세대(산업단지 근로자 90, 청년·고령자 30)

◦ 사 업 비 : 176억원(국비 52.8, LH 105.6억, 시비 17.6억)

◦ 시행부서 : 국토교통부, 토지주택공사

□ 추진실적

◦ 근로자 행복주택 공모사업 선정(국토교통부)	: 2019. 10. 23.

◦ 사업부지 지구단위 계획 변경 완료(높이 및 용적률 변경)	: 2019. 12. 20.

- 기정 : 높이(4층), 용적율(350%) → 변경 : 높이(10층), 용적율 400% 등

◦ LH – 남원시 행복주택 건립추진을 위한 MOU 체결	: 2020. 6. 2.

◦ 건축, 토목, 기계 분야 발주 및 계약체결	: 2020. 11.

- 계약금액 : 122억원,     - 시공사 선정 : 태진건설산업(주)

◦ 공공주택건설 사업계획승인(국토교통부)	: 2020. 12.

◦ 행복 주택 건립 부지 매매계약 체결	: 2021. 2.

◦ 사업착공 (5월 말 기준 공정률 4% / 토공가설 완, 파일시공 중)  : 2021. 3. 20.

□ 금후계획

◦ 사업보조금(2021년 분) 지급	: 2021. 6.

◦ 사업준공(예정)	: 2022. 9

◦ 입주예정	: 2023. 1.

산업단지 통근버스 임차 지원사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 대    상 : 광치 1·2단지 / 노암 1·2·3단지

◦ 사업기간 : 2020∼2022(3년간)

◦ 사 업 비 : 5.2억원(국비 3.6, 시비 1.6), 지방비 10%이상 부담

◦ 지 원 액 : 시․군당 전세버스 임차비용을 매년 1억2천만원씩 3년간 지원

◦ 공모부처 : 고용노동부

□ 추진실적

◦ 고용노동부 정부합동 공모사업 선정            : 2020. 3. 6.

◦ 전주지방 노동청 사업추진 실무협의 완료        : 2020. 3. 18.

◦ 통근버스 최초 운행                           : 2020. 5. 29.

◦ 2020 통근버스 수혜 기업체(대상자) 및 지원금액 : 7개업체 / 113백만원

◦ 통근버스 운행 탑승자 수요조사	: 2021. 1. 4. ~ 1. 6.

◦ 통근버스 운행 사업자 선정 및 계약체결        : 2021. 1. 29.

◦ 통근버스 운행	: 2021. 2. 1. ~

□ 금후계획

◦ 통근버스 운행 상반기 만족도 조사 실시        : 2021. 7월중

◦ 통근버스 임차 지원사업 평가보고서 제출       : 2021. 11월중

◦ 통근버스 운행 하반기 만족도 조사 실시        : 2021. 12월중

남원일반산업단지 산업용지 분양 추진

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 사매면 월평리 1109 일원

◦ 면    적 : 47블럭 585,569㎡(분양 42 / 495,589㎡, 임대 5 / 89,980㎡)

◦ 분양가격 : 98,530원/㎡(325,000원/3.3㎡)

- 임  대 : 보증금(분양가의 10%), 임대료(분양가의 1.5%/년), 5년간

◦ 업    종 : 음·식료품, 금속가공, 전자·전기 장비, 자동차부품 등 제조업

□ 추진실적

◦ 2021년 투자협약 실적 : 5개 기업

(단위 : ㎡, 억원, 명)

기 업 명	위 치	부지규모	건축면적	투자금액	고 용	비 고
계		95,114	34,095	287	160
사매농기상사	산업5-1일부	6,600	1,386	15	9
(주)아시아	1142번지외3	33,000	11,550	108	42
(유)경원쇼트기계	1111번지	30,994	9,918	76	41
(유)수엔지니어링	1113번지	15,517	5,290	45	34
(유)발리코퍼레이션	1114번지일부	9,003	5,951	43	34

※ 2020년 투자협약 실적 : 3개 기업(67,868㎡ / 337억원 / 137명)

- 2개사(대승엠앤에스, CK안전유리) 가동중

□ 금후계획

◦ 기업 현지방문 및 대표자 면담으로 공격적인 투자유치활동 전개

◦ 지속적인 입주대상 타깃기업 발굴 및 투자 동향파악 등 선제적 대응

노암산업단지(3지구) 투자유치 마무리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 시묘길 43 일원(노암동)

◦ 면    적 : 25블럭 208,423㎡(분양률 96.5%)

- 미 분 양 : 1개 블럭(7,325㎡) / 화장품 업종

- 투자협약 : 4개 기업(건축 중 1, 계약·설계 1, 투자준비 2)

◦ 분양가격 : 75,020원/㎡(248,000원/3.3㎡)

□ 추진실적

◦ 2020년 투자협약 기업 : 4개 기업

(단위 : ㎡, 억원, 명)

기 업 명	면 적	투자금액	고 용	투 자 진 행 상 황
계	42,928	512	130
(주)코빅스	14,344	150	60	‘21년 1단계 준공 / ‘22년 증설 계획
(주)성보F&G	11,653	290	40	‘21. 2월 입주계약 / ‘21년 7월 착공 ※ 설계 중, 당초 투자(70억원) 대비 증
(주)지엘그레이프	9,112	50	15	‘20. 5월 협약 / ‘21년 하반기 예정
(유)엘림산업	7,819	22	15	현재 건축 중(공정률 95%)

□ 금후계획

◦ 미분양 1개 블럭 투자협약 체결 및 미착공 기업 신속한 투자독려

◦ 투자기업 공장 인허가 지원 및 지속적인 사후관리로 투자이탈 방지

재정지원으로 투자유치기업 경쟁력 강화

(계속사업)

□ 개    요

◦ 국가지원(국비) : 지방자치단체의 지방투자기업 유치에 대한 국가의 재정자금 지원기준

- 대     상 : 수도권이전, 신·증설기업(업력 3년, 고용10인 이상)

- 지원 규모 : 설비투자금액의 14% 이내(지역특성화 업종 : 10% 가산)

- 매칭 비율 : 국비 80%, 지방비 20%(도비 70%, 시비 30%)

◦ 시 지원(시비) : 남원시 기업 및 투자유치 촉진 조례 및 시행규칙

- 대     상 : 국비지원 외 기업

- 지원 규모 : 투자금액 10억원 초과 금액의 10% 범위 내

- 분양가지원 : (일반산업단지) 6,600㎡이상시 분양가 20~50% 지원

□ 추진실적

◦ 2021년도 상반기 지방투자촉진보조금 신청기업 없음

□ 금후계획

◦ 투자촉진보조금 정산(국비) 및 잔여분 지급 : 투자완료 후 신청 즉시

구 분	기 업 명	재 원	보조금액(억원)				투자진행상황	비 고
			계	국	도	시
계	7개 기업		126.14	80.57	14.10	31.47
투 자 보 조	(주)성보F&G	국 비	81.71	65.37	11.44	4.90	착공준비
	대명창호(주)	국 비	19.00	15.20	2.66	1.14	가 동 중
	(주)CK안전유리	시 비	16.18	-	-	16.18	가 동 중
	(주)대승엠앤에스	시 비	6.65	-	-	6.65	가 동 중
	(유)엘림산업	시 비	1.06	-	-	1.06	준공예정
물 류	조은플러스(주)	시 비	1.36	-	-	1.36	가 동 중
고 용	(주)오헤브데이호텔	시 비	0.18	-	-	0.18	가 동 중

남원 일반산업단지 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위치/면적 : 사매면 월평리 1109 일원

- 토지이용계획 : 776천㎡(산업시설 586, 지원시설 6, 공공시설 184)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2021년(5개년)

◦ 주요유치업종 : 금속, 음료식품, 전자, 전기장비, 자동차부품 등

◦ 총사업비 : 555억원(특별교부세 10, 시비 545 )

◦ 연도별 투자계획                                      (단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2018	2019	2020	2021이후	비고
총 계	555	322	170	29	30	4
공 사	311	90	164	28	26	3
보 상	194	186	4	-	4	-
용 역	39	36	1	1	-	1
기 타	11	10	1	-	-	-

□ 추진실적

◦ 남원 일반산업단지 조성 추진계획 수립              : 2012. 10. 24.

◦ 제반 용역 착수(개발계획 및 실시설계, 환경·교통 등) : 2013. 3. 22.

◦ 산업단지 계획 승인고시(전라북도)                   : 2015. 5. 1.

◦ 일반산업단지 조성사업 착공                         : 2017. 3. 29.

◦ 일반산업단지 조성사업 준공(1공구)                  : 2020. 10. 30.

□ 금후계획

◦ 일반산업단지 조성사업(2공구) 사후환경영향조사 관련 변경협의 : 2021. 5. ~

◦ 일반산업단지 조성사업(2공구) 착공                  : 2021. 6. ~

남원 일반산업단지 국고지원사업

[공공폐수처리시설, 하·폐수처리수 재이용시설]

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업별 상세조서                                       (단위 : 억원)

구 분	총 계	공공폐수처리시설	하·폐수처리수 재이용시설
총사업비	244	213	31
사 업 량	-	Q=2,000㎥/일 (1단계 400)	Q=325㎥/일 (1단계 65)
사업기간	-	2018~2021년 (2~4단계‘22이후)	2021~2022년 (2~4단계‘23이후)
진행과정	-	1단계 공사 중 (공정율 65%)	기본 및 실시설계 시행 중

◦ 연도별 투자계획                                        (단위 : 억원)

구 분	총계	기투자	‘19	‘20	‘21	‘22이후	비고
총 계	244 (국 140) (시 104)	7 (국 5) (시 2)	0 (국 0) (시 0)	27 (국 15) (시 12)	47 (국 35) (시 12)	163 (국 85) (시 78)
공공폐처리시설 (국·시비)	213 (국118) (시 95)	7 (국 5) (시 2)	-	27 (국 15) (시 12)	43 (국 32) (시 11)	136 (국 66) (시 70)
하·폐수처리수 재이용시설(국·시비)	31 (국 22) (시 9)	-	-	-	4 (국 3) (시 1)	27 (국 19) (시 8)

□ 추진실적

◦ 공공폐수처리시설(1단계/1차분) 준공                  : 2021. 3. 15.

◦ 공공폐수처리시설(1단계/2차분) 착공                  : 2021. 3. 16.

◦ 하·폐수처리수 재이용시설 기본 및 실시설계 용역 착수  : 2021. 5. 3.

□ 금후계획

◦ 하·폐수처리수 재이용시설 기본 및 실시설계 용역 완료  : 2021. 10.

◦ 하·폐수처리수 재이용시설 설치사업 착공             : 2021. 11.

◦ 공공폐수처리시설 1단계(Q=400㎥/일) 준공             : 2021. 12.

□ 5분발언 추진상황

발언일자 : 2020. 11. 17. (제240회)		발언의원 : 김정현 의원
발언내용	남원시 경제정책 패러다임 전환
◦ 100인 이상 고용기업 토지 장기임대 제도 검토 ◦ 빅데이터와 AI를 활용하는 디지털 산업단지 및 소재·부품·장비 특화단지 연계방안 검토
추진상황
◦ 산업단지 임대용지 확보 : 5블럭 89,980㎡ - 보증금(분양가의 10%), 임대료(분양가의 1.5%/년), 5년간(연장가능) ◦ 빅데이터와 AI 활용, 소재·부품·장비 기업 적극 투자 유치 노력 - 전북도와 협력 유치대상 타깃기업(탄소 소재 소·부·장 관련) 발굴 - 탄소 소재(나노다이아몬드) 제조기업 대상 일반산업단지 입주 협상중 - 산업단지 입주기업 관리시스템 체계화(DB구축) 및 고도화 추진 ◦ 코로나-19관련, 비대면 산업의 확장과 물류(유통)시설의 입지수요증가 - 물류시설 등 신산업 유치를 위한 기반시설 마련 및 관련규정 개정