2021. 6.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

환 경 사 업 소

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2021년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 하수도 수해복구사업 추진

◦ 남원처리구역 하수관로 확장사업

◦ 아영 인풍지구 하수관로 정비사업

◦ 산내지구 하수관로 정비사업

◦ 요천생태습지공원 관리

◦ 남원하수처리장 운영 및 시설개선

◦ 강우시 하수관리 시범사업

◦ 남원 노후 하수관로 정비사업

◦ 남원(3단계) 하수관로 정비사업

◦ 소규모 마을하수처리시설 개량사업

◦ 운봉·인월·소규모 하수도시설 운영관리

일  반  현  황

□ 기    구

									환경사업소장
									왕 길 성
하수경영담당					하수시설담당								하수처리담당										마을하수담당
박 병 준					강 자 청								유 홍 규										문 하 성
∘행정 종합계획 수립 ∘공공 시설물 관리 ∘공기업 특별회계 운영 ∘요천생태습지공원 관리 ∘하수도 요금 부과징수 ∘물 재이용 사업 추진					∘하수도 중장기계획 수립 ∘하수관거정비 사업 추진 (노후,남원3단계,용전,서도 등) ∘오수중계펌프장 관리 ∘배수설비 설치신고 및 관리 ∘하수도 원인자 부담금 부과징수								∘하수처리 종합계획 수립 ∘남원하수처리장 운영 ∘분뇨처리시설 운영 ∘슬러지 등 탄화시설 운영 ∘음식물폐기물 처리시설 운영 및 관리										∘운봉·인월 하수처리장 관리 ∘소규모 마을하수처리장 관리 (노후시설 개량사업 등) ∘낙동강수계 기금관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	22	1	4	5	6	6	청 경 2 환경관리원 2 공 무 직 3
현 원	20	1	9	2	5	3	청 경 2 환경관리원 3 공 무 직 4
증 감	△2	-	5	△3	△1	△3	2

2021년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 남원(3단계) 하수관로 및 노후 하수관로 정비사업 본격추진 ◦ 운봉□인월 및 소규모마을하수처리시설 관리대행 실시 ◦ 하수처리 노후 시설물 개선을 통한 안정적인 수질관리 ◦ 요천생태습지공원 쉼터 일제정비 및 애견놀이터 운영 확대 ◦ 하수도사용료 인상에 따른 세입재원 확충 및 남원시 하수도 경영 개선

□ 하수도시설 지속적인 확충 및 유지관리

◦ 강우시 하수관리 시범사업 및 하수관로 정비사업

- 차집관로 및 2단계 하수관로 정비사업 공사추진

- 3단계 하수관로 및 노후 하수관로 정비사업 공사추진

◦ 마을하수도 설치사업

- 용전지구 및 서도지구 마을하수도 설치사업(관로, 처리장) 공사추진

□ 하수처리 노후시설물 개선 및 최적운영으로 청정하천 수질보전

◦ 하수처리시설 방류수 수질기준 준수 (2021.04.30.기준)

- 처리상태 : BOD 2.1㎎/L, SS 5.9㎎/L, T-N 16.025㎎/L, T-P 0.085㎎/L

(법적기준 : BOD 5㎎/L, SS 10㎎/L, T-N 20㎎/L, T-P 0.3㎎/L)

□ 하수처리장과 연계한 생태습지공원 운영·관리

◦ 요천생태습지공원 수목 및 잔디 식재, 개수대 설치, 시설물(휀스, 쉼터)정비 등 추진

◦ 요천생태습지공원 애견놀이터 개장시간 조정으로 연장운영 가능

◦ 요천생태습지공원 잡초제거 및 환경정비로 쾌적한 휴식공간 제공

	하반기 추진방향
◦ 하수도시설 지속적인 확충 및 유지관리(용전·서도지구 마을하수도 설치사업 완료) ◦ 하수처리시설 노후시설 개선으로 방류수질 법적기준 준수 ◦ 요천생태습지공원 지속적인 수목 관리 및 시설 정비 추진

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

하수도 수해복구사업 추진

(신규사업)

□ 개    요

◦ 대    상 : 14개소 (소규모 마을하수처리시설 8개소, 하수관로 6개소)

◦ 복구사업비 : 4,784백만원 (전액국비)

◦ 복구개요

구 분	위 치	복구금액 (백만원)	비고
계	14개소	4,784
소규모 마을하수 처리시설	8개소 (백일,송내,사석,상귀,세전,입암,서만,호곡)	3,608
하수관로	6개소 (주촌천,원천천,광치천,옥률천,장포천,금강마을)	1,176

◦ 복구기간 : 2020. 8. 15. ~ 2021. 6. 30.

◦ 사업내용

- 소규모 마을하수 처리시설 : 처리장 개량복구 (기계,전기,토목,건축 등)

- 하수관로 : 하천내 차집관로 및 하수관로 원상복구 L=3.2km

□ 추진실적

◦ 수해발생에 따른 응급복구 시행              : 2020. 8. 15. ~ 9. 30.

- 소규모 마을하수처리시설 : 임시 응급운영 (8개소)

- 하수관로 : 관로 임시설치(하천내 오수 유출방지), 관로준설

◦ 하수관로 수해복구  공사완료(6개소)	: 2021. 6. 7.

◦ 하수처리시설 수해복구 (공정율 95%)

- 공사 완료 : 7개소(백일, 송내, 사석, 상귀, 세전, 입암, 서만)

- 공사 진행중 : 1개소(호곡)

□ 추진계획

◦ 호곡처리장 침수대비조 설치 완료	: 2021. 6월말

남원처리구역 하수관로 확장사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 일원 (9개 마을)

- 화정동, 신정동, 화정(한우물), 주생(부동, 중동, 상동, 대지, 소지 등)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=16.2km, 배수설비 730여 가구

◦ 총사업비 : 17,270백만원(국비 12,089, 시비 5,181)

※ 2021년 사업비 : 714백만원 (국비 500, 시비 214)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년 (4개년)

□ 추진실적

◦ 신규사업지구 신청                         : 2020. 4월

◦ 2021년 신규사업지구 선정                  : 2020. 12월

◦ 실시설계용역 추진	: 2020. 6월 ~ 2021. 5월

- 현장조사 및 설계서 작성

- 소규모환경영향성검토 시행

- 설계안정성검토 시행

□ 금후계획

◦ 실시설계 완료	: 2021. 7월

◦ 환경부 재원협의 및 행정절차 이행	: 2021. 8월

◦ 공사착공	: 2021. 9월

◦ 전체사업 완료	: 2024. 12월

아영 인풍지구 하수관로 정비사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 아영면, 인월면 일원 (12개 마을)

- 아영(봉대,외인,내인,매산,서갈,동갈), 인월(덕실,연실,자래,외건,내건,지산)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=15.4km, 배수설비 450여 가구

◦ 총사업비 : 16,000백만원(국비 11,200, 시비 4,800)

※ 2021년 사업비 : 714백만원 (국비 500, 시비 214)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년 (4개년)

□ 추진실적

◦ 신규사업지구 신청                         : 2020. 4월

◦ 2021년 신규사업지구 선정                  : 2020. 12월

◦ 실시설계용역 추진	: 2020. 6월 ~ 2021. 5월

- 현장조사 및 설계서 작성

- 소규모환경영향성검토 시행

- 설계안정성검토 시행

□ 금후계획

◦ 실시설계 완료	: 2021. 7월

◦ 환경부 재원협의 및 행정절차 이행	: 2021. 8월

◦ 공사착공	: 2021. 9월

◦ 전체사업 완료	: 2024. 12월

산내지구 하수관로 정비사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산내면 일원 (5개 마을)

- 산내면(상황, 중황, 하황, 중기, 삼화)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=6.6km, 배수설비 280여 가구

◦ 총사업비 : 6,500백만원(국비 4,550, 시비 1,950)

※ 2021년 사업비 : 358백만원 (국비 250, 시비 108)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년 (2개년)

□ 추진실적

◦ 신규사업지구 신청                         : 2020. 4월

◦ 2021년 신규사업지구 선정                  : 2020. 12월

◦ 실시설계용역 추진	: 2020. 6월 ~ 2021. 5월

- 현장조사 및 설계서 작성

- 소규모환경영향성검토 시행

- 설계안정성검토 시행

□ 금후계획

◦ 실시설계 완료	: 2021. 6월

◦ 환경부 재원협의 및 행정절차 이행	: 2021. 7월

◦ 공사착공	: 2021. 7월

◦ 전체사업 완료	: 2022. 12월

요천생태습지공원 관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2021. 12월(연중)

◦ 총사업비 : 301백만원

◦ 관리인력 : 2명 (환경관리원 1, 공무직 1), 공공근로 상시배치

◦ 사업내용 : 화단 조성, 잔디식재, 쉼터조성, 애견놀이터 운영

□ 추진실적

◦ 시민 휴식 공간 설치 및 정비

- 개수대 1개소 (6구형), 그네벤치 2개소, 안전울타리 110경간(L=220m)

- 조경수 식재 (병꽃나무 1,200주), 잔디식재 (2,198㎡)
- 수목 관리 (전정, 제초), 음수대 보수 5개소, 파고라 도색 15개소

◦ 애견놀이터 운영관리

- 연장운영 (09:00 ~ 21:00)	: 2021. 3월 ~ 10월

- 안내판 설치, 시설물 정비 (놀이대 등), 청결관리 (배변수거, 잡초제거 등)

□ 금후계획

◦ 습지부 정비(준설, 분수 및 수차 등)	: 2021. 5월 ~ 9월

◦ 시설물 정비 및 관리	: 2021. 5월 ~ 9월

- 모정, 파라솔, 안내판, 태양광가로등, CCTV, 산책로 정비 등

◦ 수목 관리 및 식재	: 연중

- 전정 및 제초작업, 고사목 제거 및 잔디보식 등

◦ 애견놀이터 운영관리	: 연중

남원하수처리장 운영 및 시설개선

(계속사업)

□ 개    요

◦ 시설용량 : 50,000톤/일, 처리공법 : Symbio공법

◦ 처리개요 : 생활하수, 분뇨, 침출수 및 음식물류 폐기물의 병합처리

◦ 수질관리항목 : 총 6항목 (BOD, TOC, SS, T-N, T-P, 총대장균군수)

◦ 슬러지 처리 : 탄화처리 (처리시설 민간위탁 관리)

□ 추진실적

◦ 철저한 수질관리로 방류수질기준 준수

(단위 : ㎎/L, 개)
항목 구분	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균군수	비고
유입수	131.5	88.5	169.6	39.285	3.234	96,758
방류수 / 기준	2.1 / 5	8.9 / 20	5.9 / 10	16.025 / 20	0.085 / 0.3	39 / 1,000

◦ 수질관리를 위한 처리시설 정비 및 개선

- 탈리액 이송장치 설치공사 (171백만원) : ‘20. 12. 09. ~ ‘21. 03. 03.

► 음식물 병합처리로 발생하는 고농도의 탈리액 1차 처리 운영

- 드럼스크린 개선, 호퍼 전기판넬 정비 등 실시

◦ 음식물 병합처리 : 음식물류 폐기물 17.3톤/일 (총 1,786.45톤) 처리

◦ 환경부 2022년 스마트 하수처리장 국비보조사업 신청 : 2021. 3월

- 노후 시설물 일제 정비·개선을 통한 스마트 하수처리장 구축

(사업비 60억 / 국비 30억, 도비 15억, 시비 15억)

□ 금후계획

◦ 정기적인 실험분석 및 운영시스템 모니터링으로 방류수질 기준준수

- 실험 데이터를 통한 운영시스템 관리로 최적의 수질관리 시스템 구축

- 방류수 수질 상시 모니터링 : TMS

◦ 시설물 점검·정비, 개선으로 안정적인 처리시설 운영

- 처리시설 점검(매주), 구조물 안전점검(년2회), 시설정비(상시)

- 원심탈수기 설치사업 / 600백만원	: 2021. 4월 ~ 8월

강우시 하수관리 시범사업

(계속사업)

□ 개    요

구 분		차집관로 정비사업		남원(2단계) 하수관로 정비사업
위 치		➢ 남원시 일원 (8개하천)		➢ 남원시 일원 (6개지역)
사 업 량		➢ 차집관로 정비 L=31km		➢ 하수관로 정비 L=57km ➢ 배수설비 3,620여 가구
총사업비		➢ 41,974백만원(국27,937, 시14,037) ➢ 기투자 : 33,370‘21년 : 1,922		➢ 34,477백만원(국24,099, 시10,378) ➢ 기투자 : 24,626‘21년 : 4,665
사업기간		➢ 2018~2021		➢ 2018~2021

□ 추진실적

◦ 시범사업 대상 선정	: 2015. 2월

◦ 한국환경공단 위·수탁 협약 체결	: 2015. 3월

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: 2015. 6월 ~ 2018. 8월

◦ 공사추진	: 2018. 10월 ~

- 현장 및 민원관리를 위해 매주 1회 회의시행 (한국환경공단, 시공사)

- 현장관리(안내간판, 안전시설물 점검)를 위해 매주1회 합동현장점검 시행

◦ 공 정 율 : 차집관로 82% , 2단계 85%      : 2021. 5월 현재

(차집:31km 중 26km완료, 2단계:57km중 50km완료, 배수설비 3,592가구 중 3,118가구 완료)

□ 금후계획

◦ 차집관로 정비(요천구간) 공사완료                  : 2021. 5월말

◦ 사업효과 분석을 위한 불명수 유량데이터 분석      : 2021. 6월~7월

◦ 전체사업 완료                                    : 2021. 10월

남원 노후 하수관로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 일원 (시청주변 - 도통택지 1지구)

◦ 사업내용 : 노후 하수관로 정비 L=6.9km, 배수설비 300여 가구

◦ 총사업비 : 8,448백만원(국비 3,224, 시비 5,224)

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: 2017. 2월 ~ 2017. 11월

◦ 환경부 재원협의 등 행정절차 이행	: 2018. 5월 ~ 2019. 7월

◦ 공사추진	: 2019. 12월 ~

◦ 공 정 율 : 95%	: 2021. 5월 현재

(하수관로 6.9km 중 6.7km완료, 배수설비 300가구 중 295가구 완료)

□ 금후계획

◦ 기존 도로 배수시설물 부분보수 시행         : 2021. 5월

◦ 임시포장구간 완전포장 시행                 : 2021. 5월 ~ 6월

◦ 전체사업 완료                              : 2021. 7월

남원(3단계) 하수관로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원처리구역 및 운봉처리구역

◦ 사업내용

- 남원처리구역 : 오수관로 설치 L=31.7km, 배수설비 1,763가구

- 운봉처리구역 : 오수관로 설치 및 개량 L=15.2km

◦ 사 업 비 : 37,818백만원(국비 22,128, 시비 15,690)

※ 2021년 사업비 : 16,328백만원(국비 16,328, 시비  - )

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

□ 추진실적

◦ 2018년 신규사업지구로 확정 내시	: 2017. 11월

◦ 기본 및 실시설계 용역시행	: 2017. 11월 ~ 2019. 3월

◦ 공사추진                                 : 2020. 2월 ~

- 주천면 용궁, 상주, 하주마을, 신촌동, 향교동, 용정동, 노암동 등

◦ 공 정 율 : 35%	: 2021. 5월 현재

(하수관로 31.7km 중 18.2km완료, 배수설비 1,763가구 중 521가구 완료)

□ 금후계획

◦ 2021년 하반기 공사시행 추진

- 기존 공사시행구간 마무리

- 주천면 내송, 은송, 신기, 용담마을

- 향교동, 광치동, 신정동 일원

◦ 전체사업 완료                             : 2022. 12월 까지

소규모 마을하수처리시설 개량사업

(계속사업)

1. 방촌 소규모 마을하수처리시설 개량사업

□ 사업개요

◦ 소 재 지 : 금지면 방촌리 1272-1 (처리구역 : 방촌)

◦ 사 업 비 : 1,288백만원(국 386, 시 902)

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년 / 처리용량 50㎥/일

□ 추진실적 및 금후계획

◦ 공사 착공	: 2020. 12월

◦ 임시처리시설 설치 및 운영(50㎥/일)	: 2021. 02월~

◦ 기존시설 슬러지 준설 및 철거, 폐기물처리	: 2021. 03월

◦ 터파기, 가시설 설치	: 2021. 03월

◦ 지하 구조물 레미콘 타설	: 2021. 05월

※ 5월말 공정률 : 40%

◦ 공사 준공	: 2021. 12월

2. 비전 소규모 마을하수처리시설 개량사업

□ 사업개요

◦ 소 재 지 : 운봉읍 화수리 213-1 [처리구역 : 비전, 전촌, 군화동]

◦ 사 업 비 : 600백만원(국 180, 시 420) ⇒ 재원협의시 변경

◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2021년 / 처리용량 : 60㎥/일

□ 추진실적 및 금후계획

◦ 기본 및 실시설계 착수	: 2020. 4월

◦ 하수도정비 기본계획 부분변경(환경부)	: 2021. 1월

◦ 공법선정	: 2021. 5월

◦ 변경인가(전라북도) 및 재원협의(환경부)	: 2021. 9월

◦ 공사착공	: 2021. 11월

운봉·인월·소규모 하수도시설 운영관리

(계속사업)

□ 개   요

◦ 현    황 : 공공하수도시설 114개소

- 공공하수처리장 (500㎥이상) : 2개소

- 소규모 공공하수처리장 (500㎥이하) : 61개소

- 중계펌프장 : 51개소

◦ 운영방법 : 관리대행 [(주)일토씨엔엠 & (주)티에스케이워터]

◦ 계약금액 : 1,600백만원

□ 추진실적

◦ 소규모 마을하수 시설물 정비	: 2021. 1월 ~ 6월

- 35건 (기계 30건, 전기 5건), 58백만원

◦ 방류수 수질분석(법정 수질기준 준수)	: 2021. 1월 ~ 6월

- 운봉,인월:매일, 50톤이상 38개소:주1회, 50톤미만 23개소:월1회

◦ 기술진단 (4개소/대곡,부절,송기,고촌, 42백만원)	: 2021. 3월 ~ 6월

◦ 운봉, 인월 하수처리장 악취 분석 (정상)	: 2021. 4월

◦ 노후 및 부품 단종 자동제어반 교체 (11개소, 170백만원)	: 2021. 4월 ~ 5월

◦ 운봉·인월 시설물 안전점검 (상반기)            : 2021. 4월 ~ 5월

◦ 막분리공법 평막 교체 (2개소/방동,평촌, 96백만원)	: 2021. 4월 ~ 5월

□ 금후계획

◦ 소규모 하수처리시설 내진 성능평가 (43개소, 221백만원)	: 2021. 3월 ~ 7월

◦ 뱀사골 지역 하수처리장 하절기 휴가철 특별관리	: 2021. 7월 ~ 8월

- 수돗물 사용 절약 현수막 게첨 및 홍보물 배부

◦ 폐쇄 처리시설 철거 (2개소/원천·용전, 130백만원)	: 2021. 7월 ~ 12월

◦ 하수처리장 위탁업체 관리	: 2021. 7월 ~ 12월

- 정기적인 수질관리 확인 점검 (월1회)

◦ 운봉,인월 하수처리장 시설물 정기점검 (하반기)	: 2021. 10월 ~ 11월