2021. 9

2021년 주요업무 추진실적

건   설   과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2021년 주 요 업 무 결산

□ 2021년 주요업무 추진실적

◦ 국가하천 스마트 홍수관리시스템

◦ 겨울철 도로 제설대책 추진

◦ 읍면지역 안전한 도로망 확충 정비

◦ 읍면지역시도 정비현황

◦ 농어촌도로 정비현황

◦ 통행불편 마을진입로 정비현황

◦ 위험도로 선형개선

◦ 도로 유지관리사업

◦ 도로 재해복구사업 추진

◦ 지방하천 정비사업

◦ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업

◦ 소하천 정비사업

◦ 하천 유지관리사업

◦ 요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성

◦ 하천재해복구사업

일  반  현  황

□ 기    구

											건 설 과 장
											서 지 호
건설행정담당										도로담당														하천담당
양 병 오										김 현 호														백 강 규
설해대책추진 도로 유지 관리․보수 도로 점‧사용 허가 국‧공유 재산관리 노점상‧과적 단속										읍면시도 확․포장사업 농어촌도로 확․포장사업 기업유치 기반시설 확충사업 통행불편 도로사업 도로 유지 관리사업														치 수 사 업 하천유지관리 육상골재채취․허가 공유수면관리 하천점․사용허가

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	37	1	3	7	4	4	□청원경찰 : 1 □공 무 직 : 17
현 원	36	1	6	3	3	6	□청원경찰 : - □공 무 직 : 17
증 감	△1	-	3	△4	△1	2	□청원경찰 : △1 □공 무 직 : -

2021년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 지방재정 확충을 위한 국가예산 확보에 총력 - 국도․국지도 건설 5개년 계획(`21~`25) 사업 반영 대응(5개 노선) ·국도 24호선(이백~운봉) 2차로 개량, 국지도 37호선(인월~아영) 2차로 확장 및 개량, 국지도 60호선(주천 호경~고기) 2차로 개량, 국도 24호선 (대강~대산) 2차로 개량, 동부내륙권(정읍~남원) 2차로 개량 ※『동부내륙권(정읍~남원)』구간 중, 국도 미지정 구간(임실 덕치~ 순창 동계~남원 주천) L=30.9㎞ 국도 지정(승격) / 2021. 5. 13. - 대강 하이패스 I.C 설치(한국도로공사) ·타당성 검토 적적성 검증 용역 착수(`21. 7.) - 춘향휴게소(순천~완주간 고속도로) 조기 착공 : `21. 3월 공사 착공 - 도산~서매 도로(도비 300백만원) / 서남원I.C 회전교차로(국비 140백만원) 국 ․ 도비 440백만원 확보 ◦ 도로·하천 수해복구 조기 추진으로 주민 불편 최소화 - 재해복구 86개 지구(도로 15, 하천 71) 중 86개 지구 발주 완료(100%) (도로 2,242백만원 / 하천 47,373백만원) ※ 78개 지구 공사 완료(도로 13개, 하천 65개 지구) - 소규모 도로·하천 재해복구공사 : 우기 이전 완공 - 수해피해 신고 누락분에 대한 전수조사 및 신속한 실시설계 용역 추진으로 재해예방 추진 ◦ 시민 만족 중심의 도로·하천 유지관리 추진 - 도로 유지관리 : 3개 분야 / 80개소 / 7,170백만원 - 하천 유지관리 : 준설 및 잡목제거 등 추진 57개소 / 8,308백만원 - 법정 관리도로 총 57개 노선 431km에 대해 겨울철 제설작업, 노후포장도로 정비, 과속방지턱 정비, 도로안전시설물 설치 등 도로 유지관리 총력 - 하천 장비임차료 읍면동 자체예산 편성(600백만원)을 통한 응급 복구 및 준설 추진 ◦ 요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성 추진 - 가족단위 관광체험형 물놀이 분수광장 조성 완료에 따른 음악분수 상시 운영 및 코로나19 상황에 따라 물놀이 시설은 유동적 운영 추진 - 효율적 운영관리를 위해 관광시설사업소 시설물 유지관리 인계(＇21. 8. 2.)

□ 지역 균형발전을 위한 도로개설 - 22개 지구 / 12,025백만원

(22개 지구 중 8개지구 완료) - 추진 공정 40%

◦ 읍면지역시도 확포장 3개 지구 (L= 7.00㎞, 5,000백만원)

◦ 농어촌도로 확포장   7개 지구 (L=12.24㎞,  2,950백만원)

◦ 통행불편 마을진입로 9개 지구 (L= 5.36㎞, 2,670백만원)

◦ 위험도로 선형개량   3개 지구 (L= 2.10㎞,  1,405백만원)

□ 안전하고 쾌적한 도로 유지관리 – 106개소  / 9,412백만원

◦ 읍면지역시도 유지관리 : 23개소 등 1,650백만원

- 군도29호(아영면소재지) 아스콘 재포장, 금지 순환길 안전한 보행로,

수지면 수송제 앞 도로정비공사 등

◦ 농어촌도로 유지관리 : 19개소 등 950백만원

- 아영면 성리(농도213호) 배수개선, 산동 귀정사 진입로 정비공사(2지구), 군도25호선(산동 등구마을 앞) 외 2개소 도로정비 등

◦ 법정도로 유지관리 : 38개소 등 4,570백만원

- 사매~덕과 도로구조개선, 요천마을 인도, 과속방지턱, 읍면지역 표지판 등

- 승사교 ․ 보절 진기금다길 ․ 이백 오촌마을 아스콘 재포장 등

- 이백교․주송교 내진보강, 남원터널․승사교 등 보수보강공사 등

◦ 도로 제설작업(2020~2021)	:  12일(57개노선, 431.5㎞)

◦ 도로 재해복구사업 15개소 중 13개소 완료(복구율 87%, 복구액 : 2,242백만원)

·수해복구 누락지구 11개소 중 7개소 완료(복구율 64%, 복구액 : 313백만원)

□ 재해 사전예방을 위한 하천정비 – 142개 지구 / 80,895백만원

◦ 지방하천 정비	:  3개소  /  11,688백만원

◦ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성	:  1개소  /   5,000백만원

◦ 소하천 정비	:  4개소  /   6,222백만원

◦ 하천 유지관리(지방하천, 소하천)	:  1식     /   5,564백만원

◦ 하천 유지관리(국가하천 섬진강, 요천)	:  1식     /    2,744백만원

◦ 하천 재해복구사업	:  132개소 /  49,677백만원

·하천 재해복구사업 71개소 중 65개소 완료(복구율 91%, 복구액 : 47,373백만원)

·수해복구 누락지구 61개소 중 5개소 완료(복구율 10%, 복구액 : 2,304백만원)

2021년 주요업무 추진실적

국가하천 스마트 홍수관리시스템

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 국가하천 섬진강, 요천 일원

◦ 사 업 량 : 14개소(섬진강권역 5개소, 요천권역 9개소)

◦ 사업내용 : 수문개량(전동화), 상황실 구축(시청 내), 통신망 연결

- 원격 자동계측·제어·감시, 현장제어, 영상표출, 기록 시스템 등

◦ 사 업 비 : 2,037백만원 (국비 100%)

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2021년(2년)

사 업 명	사업량	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
		계	기투자	2021	2022이후
국가하천 스마트 홍수관리시스템	14개소	2,037	137	1,900	-	100	‘20 ~‘21

□ 추진실적

◦ 실시설계 용역 추진	:‘20. 10. ~ 12.

◦ 전라북도 원가심사 완료	:‘21.  2. 10.

◦ 국고보조금 교부결정	:‘21.  3. 5.

- 당초 1,717백만원 → 변경 1,900백만원 (시설비 증액 183백만원)

◦ 추경 성립전 사용승인	:‘21.  3. 11.

◦ 공사 및 관급자재 발주	:‘21.  3. 12. ~

◦ 국가하천 스마트 홍수관리시스템 착공/공정률 90%    :‘21.  3. 31.

- 전기·계측 : (주)중앙쏠라텍 대표 전혜원 / 남원시 소재

- 토목·기계 : (유)영도건설 대표 한덕희 / 남원시 소재

□ 금후계획

◦ 국가하천 스마트 홍수관리시스템 시운전 및 구축 완료 :‘21. 10

겨울철 도로 제설대책 추진

(계속사업)

□ 개    요

◦ 운영 기간 : 2021. 11. 15. ~ 2022. 3. 15.(4개월간)

◦ 상황실 운영 : 건설과(2개조 5명), 각 읍면동사무소

◦ 제설 대상 : 법정관리도로 총 57개 노선 431.5km

계		시 관리국도		지 방 도		시 도		읍면시도(군도)
노선수	작업량 (km)	노선수	작업량 (km)	노선수	작업량 (km)	노선수	작업량 (km)	노선수	작업량 (km)
57	431.5	3	25.1	8	154.9	24	38.5	22	213

◦ 제설 인력 : 27명 (도로보수원 12, 운전원 9(자체 3, 용역 6), 기타(용역6))

◦ 제설 차량 : 13대 (15톤 6(임차3), 5톤 2(임차1), 1톤 4(임차2), 굴삭기1)

◦ 제설 장비 : 279대

- 자체 보유 :  27대(제설기 12, 살포기 12, 교반기 1, 저장탱크 1, 호이스트 1)

- 읍 면 동  : 252대(트랙터용제설기 249, 1톤용 제설기 3)

◦ 제설자재 현황

(단위 :톤)

초 기 확 보 량				사 용 량				잔 량
계	염화 칼슘	제설용 소금	친환경 제설제	계	염화 칼슘	제설용 소금	친환경 제설제	계	염화 칼슘	제설용 소금	친환경 제설제
2,769	306	2,095	368	2,242	129	1,745	368	527	177	350	-

□ 추진실적

◦ 설해대책 추진계획 수립 및 제설자재 구입     : 2020. 11. ~ 2021. 3.

◦ 도로제설작업 추진(출동일수 12회)             : 2020. 12. ~ 2021. 2.

- 강설일수 23일, 적설일수 12일(대설경보 2회, 대설주의보 6회)

- 투입 장비 : 13대 (15톤 6(임차3), 5톤 2(임차1), 1톤 4(임차2), 굴삭기 1대)

- 투입제설제 : 2,242톤(염화칼슘 129, 제설용 소금 1,745, 친환경제설제 368)

□ 금후계획

◦ 설해대책 추진계획 수립 및 제설자재구입         : 2021. 9.  ~ 10.

◦ 미끄럼주의 표지판(25개) 및 모래주머니(20,000개) 설치  : 2021. 10.

◦ 상황실(건설과-2개조 5명, 읍면동) 운영	: 2021. 11. ~ 2022. 3.

◦ 제설차량 임차시행(15톤 3대, 5톤 1대, 1톤 2대)	: 2021. 12. ~

◦ 정령치 도로 통제(고기삼거리 ~ 정령치 ~ 달궁삼거리) : 2021. 12. ~ 2022. 3.

읍면지역 안전한 도로망 확충 정비

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업규모 : 도로 정비사업 22개 지구, L = 26.7㎞

◦ 총사업비 : 73,750백만원(2021 : 12,025백만원)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2028년(12개년)

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 량		총사업비	기투자	2021	2022이후	사업기간
계	22개지구	L=26.70㎞	73,750	19,725	12,025	42,000
읍면지역시도	3개지구	L=7.0㎞	21,300	6,013	5,000	10,287	`17~`25
농어촌도로	7개지구	L=12.24㎞	36,700	4,687	2,950	29,063	`17~`28
통행불편	9개지구	L=5.36㎞	10,750	5,430	2,670	2,650	`17~`23
위험도로 선형개선	3개지구	L=2.10㎞	5,000	3,595	1,405	-	`17~`21

□ 추진실적

◦ 읍면지역시도 : 완공(평촌~목가), 공사 중(부석~오촌, 도산~서매), 보상(목가~강기)

◦ 농어촌도로   : 완공(영촌선, 상황선), 공사 중(도용선)

설계 중(배촌선, 부흥선), 보상(견두선, 호은선)

◦ 통행불편     : 완공(주천 제바위, 아영 구지, 운봉 장동, 대산 안대실)

공사  중(인월 장평, 이백 오산길), 보상(인월 중군, 이백 목가)

설계 중(송동 척동)

◦ 위험도로     : 완공(군도 29호), 공사 중(수지 호곡, 이백 초촌)

□ 금후계획

◦ 읍면지역시도 : `21년 완공(도산~서매), `22년 완공(부석~오촌),

`25년 완공(목가~강기)

◦ 농어촌도로   : `21년 완공(도용선), `23년 완공(부흥선, 호은선),

`25년 완공(배촌선), `28년 완공(견두선)

◦ 통행불편     : `21년 완공(인월 장평, 이백 오산길, 인월 중군)

`23년 완공(이백 목가, 송동 척동)

◦ 위험도로     : `21년 완공(수지 호곡, 이백 초촌)

읍면지역시도 정비현황

(계속사업)

□ 개    요

◦ 계    획 : 19개 사업 / 36.46㎞ / 72,530백만원

◦ 기 투 자 : 16개 사업 / 29.46㎞ / 51,230백만원

◦ 시 행 중 :  3개 사업 /  7.00㎞ / 21,300백만원(2021 : 5,000백만원)

- `21 완공 : 1개 지구, `22 완공 : 1개 지구, `25완공 : 1개 지구

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2025년(20개년)

사 업 명		읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
				계	기투자	2021	2022이후
합 계		3개지구	7.00	21,300	6,013	5,000	10,287	52
부석~오촌		송동면	2.60	5,900	2,300	800	2,800	52	`17 ~ `22
평촌~강기	소 계		2.50	13,900	3,113	3,700	7,087	49	`17 ~ `24
	평촌 ~목가	이백면	0.70	6,413	3,113	3,300	-	100	`17 ~ `21
	목가 ~강기		1.80	7,487	-	400	7,087	5	`21 ~ `25
도산~서매		주생면	1.90	1,500	600	500	400	73	`19 ~ `21

□ 추진실적

◦ 부석~오촌  : 3차분 추진(토공, 배수공) / 공정률 45%

◦ 평촌~강기

- 평촌~목가 : 공사 완료(4. 13.) / 공정률 100%

- 목가~강기 : 용지보상 추진(보상률 70%), 도로구역 결정(변경) 절차 이행

◦ 도산~서매  : 2차분 추진(콘크리트 포장 및 L형측구 완료) / 공정률 80%

□ 금후계획

◦ 2021년 완료 : 1개 사업(도산~서매)

◦ 2022년 완료 : 1개 사업(부석~오촌)

◦ 2025년 완료 : 1개 사업(목가~강기)

농어촌도로 정비현황

(계속사업)

□ 개    요

◦ 계    획 : 25개 지구 / 29.65㎞ / 68,324백만원

◦ 기 투 자 : 18개 지구 / 17.41㎞ / 31,624백만원

◦ 시 행 중 :  7개 지구 / 12.24㎞ / 36,700백만원(2021 : 2,950백만원)

- `21 완공 : 3개 지구, `23 완공 : 2개 지구, `25 이후 : 2개 지구

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2028년(23개년)

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2021	2022이후
합 계	7개지구	12.24	36,700	4,687	2,950	29,063	21
영 촌 선	주생면	1.10	1,600	900	700	-	100	`19 ~ `21
상황선	산내면	0.60	1,950	1,150	800	-	100	‘18 ~ ‘21
도용선	주생면	0.67	1,650	1,100	550	-	100	‘17 ~ ‘21
호은선	주천면	0.90	1,800	-	100	1,700	6	`21 ~ `23
부흥선	보절면	1.20	2,100	87	100	1,913	9	`20 ~ `23
배촌선	주천면	3.77	9,600	900	500	8,200	15	‘19 ~ ‘25
견두선	수지면	4.00	18,000	550	200	17,250	4	‘18 ~ ‘28

□ 추진실적

◦ 영 촌 선	: 공사(최종) 완료(6월)

◦ 상 황 선    : 공사(최종) 완료(6월)

◦ 도 용 선	: 3차분 추진(구조물공, 배수공) / 공정률 65%

◦ 호 은 선	: 실시설계용역 완료, 관련 법 협의 행정절차 이행, 분할측량

◦ 부 흥 선	: 주민설명회 개최(5. 3.), 실시설계용역 완료

◦ 배 촌 선	: 실시설계 완료, 소규모 환경영향평가, 사전재해 영향성

검토 용역 추진 / 중송지구 6월 완료

◦ 견 두 선    : 용지보상 협의 추진, 농어촌도로 노선지정 절차 이행

□ 주요쟁점 및 대책

《 주생 도용선 》

◦ 종점부 사유지(1필지) 보상 협의 지연으로 사업추진 애로

- 17필지 중 16필지 완료(94%) / 협의요청 공문 발송 2회

□ 최종 협의요청 공문 발송 및 미 협의 시, 토지수용 재결절차 이행으로

연내 공사 완공 추진

《 보절 부흥선 》

◦ 주민 설명회 결과, 부흥마을 주민 다수가 사업추진을 반대하여 용지

매입 등 원활한 사업추진 애로 (※ 주민설명회 개최 3회)

□ 원활한 사업추진을 위해 부흥․서당마을 주민들의 재협의 필요

□ 금후계획

◦ 2021년 완료 : 1개 지구(도용선)

◦ 2023년 완료 : 2개 지구(호은선, 부흥선)

◦ 2025년 완료 : 1개 지구(배촌선)

◦ 2028년 완료 : 1개 지구(견두선)

통행불편 마을진입로 정비현황

(계속사업)

□ 개    요

◦ 계    획 : 62개 지구 / 34.03㎞ / 34,336백만원

◦ 기 투 자 : 43개 지구 / 25.35㎞ / 17,636백만원

◦ 시 행 중 : 9개 지구 /   5.36㎞ / 10,750백만원(2021 : 2,670백만원)

- `21 완공 : 7개 지구 / `23 완공 : 2개 지구

◦ 사업기간 : 2008 ~ 2023년(16개년)

사 업 명	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
		계	기투자	2021	2022이후
9개 지구	5.36	10,750	5,430	2,670	2,650	75
주천 제바위마을	0.65	800	400	400	-	89	`19 ~ `21
아영 구지마을	0.34	700	500	200	-	100	`19 ~ `21
운봉 장동마을	0.45	500	300	200	-	100	`19 ~ `21
인월 장평마을	0.50	1,800	880	920	-	100	`19 ~ `21
인월 중군마을	0.78	1,950	1,550	400	-	100	`17 ~ `21
이백 오산길	0.78	850	400	450	-	100	`19 ~ `21
대산 안대실마을	0.46	1,250	1,250	-	-	100	`18 ~ `21
송동 척동마을	0.60	1,000	-	-	1,000	-	`21 ~ `23
이백 목가마을	0.80	1,900	150	100	1,650	13	`19 ~ `23

□ 추진실적

◦ 완    공 : 4개 지구(주천 제바위, 아영 구지, 운봉 장동, 대산 안대실)

◦ 공 사 중 : 2개 지구(인월 장평, 이백 오산길)

◦ 용지보상 : 2개 지구(이백 목가, 인월 중군)

◦ 실시설계 : 1개 지구(송동 척동)

□ 주요쟁점 및 애로사항

《 이백 목가마을 》

◦ 목가마을 주민 다수가 토지 및 건축물 편입 사유로 사업추진 반대로

원활한 사업추진 애로 (주민설명회 개최 3회)

□ 원활한 사업추진을 위해 목가마을 주민들의 재협의 필요

□ 금후계획

◦ 2021년 완료 : 3개 지구(인월 장평, 인월 중군, 이백 오산길)

◦ 2023년 완료 : 2개 지구(송동 척동, 이백 목가)

위험도로 선형개선

(계속사업)

□ 개    요

(단위 : 백만원)

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(국비)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2021	2022이후
합 계	3개지구	2.1	5,000 (1,400)	3,595 (990)	1,405 (410)	-	100
이백 초촌	이백면	0.60	900 (450)	900 (450)	-	-	100	`20 ~ `21
수지 호곡	수지면	0.40	2,200 (950)	1,095 (540)	1,105 (410)	-	100	`19 ~ `21
군도29호선 (지리산IC~아영면사무소)	아영면	1.1	1,900	1,600	300	-	100	‘17 ~ ‘21

□ 추진실적

◦ 이백 초촌	: 용지보상 추진(20% 완료) / 공정률 10%

◦ 수지 호곡	: 용지보상 추진(80% 완료) / 공정률 50%

2차분 추진(호곡교 교량 완료, 임야부 암사면 절토)

◦ 군도29호선(아영) : 공사(최종) 완료(6월)

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 이백 초촌 위험도로 용지보상 협의가 저조하여 사업추진 지연

□ 기공승낙 협의구간 우선사업 추진과 미협의 토지 수용재결

절차이행 추진

□ 금후계획

◦ 2021년 완료	: 2개 지구(이백 초촌, 수지 호곡)

도로 유지관리사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 총사업비 : 7,170백만원(국비 140, 도비 480, 시비 6,550)

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비(백만원)	비 고
합 계		15개 지구	7,170
읍면지역시도	관 내	2개 지구	1,650
농어촌도로	관 내	2개 지구	950
법정도로 유지관리	관 내	11개 지구	4,570

□ 추진실적 - 15개 지구 / 80개소 / 4,636백만원

◦ 읍면지역시도 유지관리

- 수지면 수송제 앞 도로정비공사 외 22개소 / 1,145백만원 추진

◦ 농어촌도로 유지관리

- 아영면 성리(농도213호) 배수개선 외 18개소 / 754백만원 추진

◦ 법정도로 유지관리(도로 유지관리, 재포장, 교량 유지관리 및 내진보강 등)

- 천거동 승사교 앞 아스콘 재포장공사 외 37개소 / 2,737백만원 추진

□ 금후계획

◦ 읍면지역시도·농어촌도로·동지역 도로(최종) 유지관리 추진 : `21. 8. ~ 12.

- 배수개선, 재포장, 교량(터널) 유지관리, 시설물 정비 등

◦ 공사 완료 : 수지면 수송제 앞 도로정비공사, 천거동 승사교 앞 아스콘 재포장 공사, 교량 내진보강공사(이백․주송교) 등

◦ 공사 추진 : 사매~덕과 도로구조개선사업, 시특법 교량(승사교)

보수보강공사, 아영면 성리 배수개선공사 등

□ 도로 유지관리사업 세부내역(2021년)

사 업 명		사업위치	사업량	사업비 (백만원)	비 고
합 계			14개 지구 / 80개소	7,170
읍면지역시도 유지관리			2개 지구 / 23개소	1,650
	시도유지관리	관내	유지관리사업 1식 / 11개소	600
	주민참여예산	L=2.63㎞	유지관리사업 12개지구	1,050
농어촌도로 유지관리			2개 지구 / 19개소	950
	농어촌도로 유지관리	관내	유지관리사업 1식 / 18개소	600
	구일선 배수개선	아영면	도로 배수개선 L=0.23㎞	350
법정도로 유지관리			11개 지구 / 38개소	4,570
	읍면지역 표지판 정비	관내	표지판 정비 1식	150	총사업비 : 300
	도로 결빙 예방사업	어현동 (문오로)	동결 억제 포장 L=0.34㎞	450	도 135 시 315
	교량 내진보강공사	이백교, 주송교	내진보강 2개소	1,000	도 300 시 700
	법정관리 시설물 안전점검	관내	정밀안전점검 용역 1식 / 2개소	150	도 45 시 105
	시특법 교량 보수보강공사	승사교	교면 재포장 A=4,560㎡	120	총사업비 : 1,600
	회전교차로 설치사업	송동면	회전교차로 설치 1식	500	국 140 시 360
	사매~덕과 도로 구조개선	사매면, 덕과면	도로 시설개선 L=1.0㎞	600	총사업비 : 1,300
	걷고 싶은 거리 조성	관내	인도 유지관리 1식 / 2개소	100
	교량(터널) 유지관리	관내	교량 보수보강 / 3개소	300
	도로 유지관리보수	관내	유지관리사업 1식 / 16개소	600
	법정도로 재포장	관내	유지관리사업 1식 / 3개소	600

도로 재해복구사업 추진

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 관내 도로

◦ 사 업 량 : 법정도로 15개소

◦ 복구내역

(단위 : 백만원)

구 분	개소	피해액	복 구 액				비 고
			계	국비	도비	시비
계	15	775	2,242	1,454	100	688
군도ㆍ농어촌도	9	403	1,254	1,254	-	-	국 100%
시 도	4	228	588	-	-	588	시 100%
시관리 지방도	2	144	400	200	100	100	국 50%, 도 25%, 시 25%

※ 수해복구 누락지구 추진 : 11개 지구, L=517m, 313백만원

□ 추진실적

◦ 응급복구공사 추진(자체 시비)	: `20.  8. ~ 10.

- 지방도 및 시관리 도로 20개소, 132백만원

◦ 수해복구 실시설계 용역 추진	: `20.  9. 24.

◦ 호우피해 복구예산 교부결정	: `20. 10. 26.

- 추가 경정예산 성립전 사용 승인(`20. 11. 17)

◦ 도로 수해복구공사 발주 완료	: `20. 12. ~ `21. 5. 14.

◦ 공사 완료(13개 지구)                          : `21.  5.

- 광치동(포도원), 고죽동, 금지 귀석, 주생 지당, 이백 양가, 대강 섬진로,

대강 남원터널, 덕과 신양, 주천 용궁, 어현동(문오로), 대산 풍촌,

수지 호곡, 주천 송치

※ 2개 지구(이백 효기, 금지 입암) : 하천 재해복구 병행 추진

◦ 수해복구 누락지구 공사 완료(송동면 용투산로 외 6개소) : `21.  8.

□ 금후계획

◦ 수해복구 누락지구 공사 추진(4개 지구)       : `21.  8. ~  12.

- 운봉 임리(고남로), 보절 금다리, 송동 두신(두곡마을), 주천 고기(구룡폭포길)

지방하천 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 아영면 풍천 외 3개소

◦ 사업기간 : 2012 ~ 2022년(11개년)

◦ 총 계 획 : 21개 지구 / 98.43㎞ / 190,771백만원

- 완료지구 : 13개 지구 / 45.05㎞ / 105,918백만원

(송내천, 내척천, 괴양천, 진기천, 백암천, 운교천, 풍천, 요천, 수외천, 수지천, 주촌천, 갈치천, 람천)

- `21년 사업 : 4개 지구 / 16,688백만원(도비 11,332, 시비 5,356)

하천별	지구별	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2021	2022이후
합 계	4개하천	22.94	78,628	40,514	16,688	21,426	73
풍 천	소 계	5.50	37,351	21,808	6,500	9,043	76	`14 ~ `22
	청계지구	0.88	6,961	6,961	-	-	100	`17년준공
	풍천지구	4.62	30,390	14,847	6,500	9,043	70	`18 ~ `22
송치천	주천송치	2.04	9,966	9,466	500	-	100	`16 ~ `21
원천천	신촌~주천	13.70	23,583	6,200	5,000	12,383	48	`17 ~ `22
다산천	덕과만도	1.70	7,728	3,040	4,688	-	100	`18 ~ `21

□ 추진실적

◦ 풍  천(인월·두락·의지) : 2차분 시행(의지지구 L=2.1km) 취암교 등    / 공정률 70%

◦ 송치천 : 전체분 공사완료	/ 공정률 100%

◦ 원천천 : 2차분 추진중(교량 3개소, 보․낙차공 4개소, 부대공 1식)  / 공정률 70%

◦ 다산천 : 3차분 추진중(축제공 및 호안 L=3.2km, 배수통관 16개소 등)  / 공정률 90%

□ 금후계획

◦ 2021년 완료 : 2개 지구(송치천, 다산천)

◦ 2022년 완료 : 2개 지구(풍  천, 원천천)

원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 신촌동 요천 합류부 ~ 주천면 고기리 일원

◦ 사 업 량 : 관광자원화 친수공간 조성 L=13.7㎞

- 축제 2.78km, 호안 5.16km, 자전거길 6.6㎞, 보․낙차공 12개소, 교량 9개소 등

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2022년(6개년)

◦ 총사업비 : 23,583백만원(국비 1,600, 도비 14,908, 시비 7,075)

- 2021년 사업비 : 5,000백만원

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진                          : ‘16.  9. 28.

◦ 용역 중간보고회 개최(시장)	: ‘18.  8.  3.

◦ 주민설명회 개최	: ‘18. 11. 29.

◦ 실시설계(안) 총사업비 변경 협의(1차) 요청 / 익산청   : ‘19.  3. 29.

- 사업비 : 당초 MP상 18,821백만원 → 24,147백만원(증 5,326)

◦ 설계VE 완료(총사업비 100억원 이상 건설공사)         : ‘19.  5.  3.

◦ 실시설계(안) 총사업비 변경 협의(2차) 요청 / 익산청    : ‘19.  7. 19.

- 사업비 : 당초 MP상 18,821백만원 → 23,139백만원(증 4,318 / 증 23%)

◦ 지방건설기술심의(전라북도)	: ‘19.  9. 23.

◦ 조달청 원가심사 및 공사발주 의뢰                    : ‘19. 10.  8.

◦ 실시설계(안) 총사업비 변경 협의(3차) 승인 / 익산청    : ‘19. 11.  4.

- 사업비 : 당초 MP상 18,821백만원 → 23,583백만원(증 4,762 / 증 25.3%)

◦ 시설공사 도급업체 선정 및 착수                      : ‘19. 12. 23.

◦ 시설공사 1차분 준공 및 2차분 착공	: ‘21.  2.

□ 금후계획

◦ 시설공사 2차분 준공	: ‘21. 12.

- 편입용지 토지 협의매수 병행 추진

◦ 시설공사 총괄분 준공	: ‘22. 12.

소하천 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 30개지구 / 19.60㎞ / 45,677백만원

- 완료지구 :  7개지구 / 12.93㎞ / 21,162백만원

(뒤하천, 율치천, 율정천, 아곡천, 신동천, 장교천, 고평천)

-‘21년사업 : 4개지구 / 6,222백만원〔시비 6,222 (100%)〕※ 균특 지방이양에 따른 시비 편성

◦ 위    치 : 남원시 아영면 당동천 외 3개소

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2023년 (8개년)

지구별	위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2021	2022이후
합 계	4개 하천	6.67	24,515	6,897	6,222	11,396	54
당동천	아영 봉대	2.69	10,711	4,859	2,900	2,952	72	‘18~‘22
오롱골천	운봉 주촌	0.82	2,350	1,768	582	-	100	‘19~‘21
과립천	이백 과립	1.88	4,348	160	1,000	3,188	27	‘20~‘23
산곡천	향교동	1.28	7,106	110	1,740	5,256	26	‘20~‘23

※ 추경1회 : 당동천(400백만원), 산곡천(740백만원)

※ 총사업비 변경협의 : 과립천 4,892백만원 → 4,348백만원, 산곡천 6,719백만원 → 7,106백만원 (‘21.7.19.)

□ 추진실적

◦ 당  동  천 : 2,3차분 병행추진 (호안정비 L=2.0km) 및 교량 5개소 등	/ 공정률 60%

◦ 오롱골천 : 1차분 완료(하천정비 L=0.7km, 교량 1개소), 2차분 추진 / 공정률 90%

◦ 과  립  천 : 보상협의 추진 및 공사 계약 중

◦ 산  곡  천 : 보상협의 추진 및 공사 계약 중

□ 금후계획

◦ 2021년 완료 : 1개 사업(오롱골천)

◦ 2022년 완료 : 1개 사업(당동천)

◦ 2023년 완료 : 2개 사업(과립천, 산곡천)

하천 유지관리사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 소하천‧지방하천‧국가하천 일원

◦ 사 업 량 : 3개사업 / L =105.04km

◦ 사 업 비 : 8,308백만원(국비 2,744, 도비 1,744, 시비 3,820)

◦ 사업기간 : 2021년

구 분	사업내용	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
합 계	5개 사업	107.84	8,308
하천 유지관리사업	하천 유지관리	15.0	600	시비 100%
	하천 하도준설	20.0	500	〃
	주민참여예산	1.09	375	〃
	소규모 민원해결	1.20	175	〃
기성제 유지관리사업	지방하천 기성제 정비	30.0	3,128	도비 50%, 시비 50%
국가하천 유지보수사업	섬진강, 요천 유지관리	38.9	2,744	국비 100%
하천 유지관리 (보조)	탑동소하천 재해위험시설 정비사업	0.20	249	도비 40%, 시비 60%
	등골소하천 소규모 정비사업	0.15	60	도비 100%
수해피해지역 현안사업	하천 유지관리(8개 지구)	1.30	477	시비 100%

□ 추진실적

【 하천 및 기성제(지방하천) 유지관리사업 】

◦ 읍·면·동 하천 유지관리사업 대상지 제출 및 현지조사	: ‘20. 12.  1.

◦ 하천유지관리사업 추진	: ‘21.  3. ~

- 하도준설 / 이백면 백암천 외 22개소 완료(L=12.44km)

- 유지관리 / 운봉읍 권포천 외 19개소(L=2.13km) 중 16개소 완료(L=1.65km) 및 4개소 추진 중

- 주민참여예산사업 / 광치동 율치소하천 외 6개소(L=1.3km) 추진 중 5개소 완료 및 2개소 추진 중

◦ 시특법 관리대상 배수통문 정밀점검용역 완료(지방하천)	: ‘21.  3. 11.

【 국가하천 유지보수사업 】

◦ 시특법 관리대상 배수통문 외 정밀점검용역 완료(요천)	: ‘21.  2. 22.

◦ 국가하천 유지관리사업 추진

- 하도준설 / 국가하천 요천(L=0.79㎞) 완료

- 유지관리 / 국가하천 요천(신평제) 정비공사 외 10개소(L=13.592km) 중 6개소 완료 및 5개소 추진 중

□ 금후계획

◦ 하천 및 기성제(지방하천) 유지관리사업

- 하반기 하천유지관리 대상지 조사 및 선정	: ‘21.  6. ~ 8.

- 하반기 하천유지관리사업 추진	: ‘21.  9. ~

- 하천유지관리 대상지 수시 점검 및 공사 추진	: 연중 수시

◦ 국가하천 유지보수사업.

- 국가하천유지보수사업 추진(시설물 및 자전거도로 등)	: ‘21.  6. ~ 7.

- 국가하천유지보수 신규사업 익산청, 전북도 협의 추진	: ‘21. 10. ~

- 섬진강‧요천 보수 대상지 조사 및 공사추진	: 연중 수시

◦ 하천 유지관리(보조)

- 등골소하천 정비사업 추진	: ‘21.  8. ~ 9.

- 탑동소하천 재해위험시설 정비사업 추진	: ‘21.  8. ~ 12.

◦ 수해피해 지역 현안사업

- 수해피해 지역 현안사업 추진	: ‘21.  8. ~ 12.

요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성

<요천 수변 관광 자원화 사업>

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 어현동 741번지 일원 / 요천 국가하천(고수부지/천변친수지구)

◦ 사 업 량 : 물놀이 분수광장 조성

- 음악분수 L=42m, 바닥분수 2개소 및 광장, 물놀이시설 A=1,170㎡

◦ 총공사비 : 9,150백만원[도비(동부권특별회계) 4,150, 시비 5,000]

- `20년 사업비 : 5,650백만원(도비 4,150, 시비 1,500)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2021년(5개년)

□ 추진실적

◦ 요천 내 수경시설 설치 추진계획 보고           : ‘17.  6. 28.

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진                   : ‘17. 10. ~ `18. 12.

◦ 사업계획 변경 추진보고                       : ‘18. 11. 23.

※ 당초 : 수경시설(분수) / 중앙저수로 ⇨ 변경 : 물놀이 분수광장 / 고수부지

◦ 음악분수 공법선정 심의 완료                  : ‘19.  6. 17.

◦ 2019년 제2차 재정투자 재심의 완료(전라북도)   : ‘19.  6. 28.

◦ 하천점용허가 승인(익산청)                     : ‘19.  9. 30.

◦ 시공업체 선정 및 공사 착수	: ‘19. 10. 29.

◦ 관급자재(음악분수 시스템) 구입                : ‘20.  3. 25.

◦ 시의회 호우피해상황 보고                      : ‘20.  9. 16.

◦ 시설공사 준공 및 음악분수 운영                : ‘21.  4. ~

※ 물놀이 시설은 코로나19 상황에 따라 잠정적 운영중지 중이며, 음악분수는 1일 1회(월요일제외 / 30분) 제한적 운영 중

◦ 시설물 인수인계(건설과 → 관광시설사업소)     : ‘21.  8. 2.

하천 재해복구사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 132개지구 / 49,677백만원

◦ 위    치 : 국가하천 조산지구 외 132개소

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2022년 (3개년)

(단위 : 백만원)

구 분	계	국비	도비	시비	비고
합 계(71개소)	47,373	46,837	268	268
국가하천(9)	2,765	2,765	-	-	남원시 대행사업
지방하천(23)	8,294	7,832	231	231	-
소하천(35)	5,313	5,239	37	37	-
개선복구(지방하천,2)	19,848	19,848	-	-	주촌천, 효촌천
개선복구(소하천,2)	11,153	11,153	-	-	감동천, 서당천

※ 수해복구 누락지구 추진 : 61개 지구 / L=3.52km / 2,304백만원

□ 추진실적

◦ 하천 응급복구공사 추진(시비)	: ‘20.  8. ~ 10.

- 37개소 / 396백만원(예비비)

◦ 재해복구사업 실시설계 용역 추진	: ‘20.  9. ~ ‘21.  6.

- 11건 / 884백만원

◦ 피해 복구액(국·도비) 확정	: ‘20.  9. 24.

◦ 예산 성립전 사용승인(13,045백만원)	: ‘20. 11. 17.

◦ 개선복구사업 실시설계 용역 추진	: ‘20. 11. 25. ~

◦ 수해피해 신고 누락지구 실시설계 용역 완료	: ‘21.  5. ~ 7.

◦ 재해복구사업 공사 추진	: ‘21.   8. ~

- 총 71개소 중 65개소 공사 완료(91%), 6개소 공사 중(9%)

- 누락지구 총 61개소 설계 완료(100%), 6개소 공사 완료(10%), 34개소 공사 중(56%),        21개소 발주준비 중(34%)

□ 금후계획

◦ 수해피해 신고 누락지구 공사 추진(56개소)	:  ‘21.  8. ~ 12.

◦ 하천 개선 ‧ 기능복원사업(5개소) 공사추진	:  ‘21.  8. ~ ‘22. 12.

- 우기 전 위험구간 우선정비 추진

-  현장 품질·안전관리 및 민원업무의 신속한 해소 등 원활한 공사추진을 위해  “하천 개선복구사업 통합건설사업관리 용역” 추진 예정