2022년 신규사업 발굴 내역

환경사업소

□ 2022년 신규사업 발굴 목록

(단위:백만원)

연번	사 업 명	사업 기간	총 사업비	2022년 사업비					비고
				계	국비	도비	시비	기타
1	분뇨처리장을 활용한 총질소 저감시설 운영	2022	20	20			20

분뇨처리장을 활용한 총질소 저감시설 운영

<환경사업소 / 하수처리>

□ 필 요 성

◦ 음식물처리시설 탈리액 오염부하량 증가로 인하여 총질소 수질관리 어려움 발생

◦ 분뇨처리장 여분의 지(地)를 활용하여 총질소 저감시설로 활용

	〈 현실태 및 현황 〉
◦ 분뇨처리장을 활용하여 탈리액 1차처리하였으나 여전히 낮은 총질소 저감 효과로 방류수 법적수질기준 미준수 상황 발생 가능

□ 사업개요 및 주요내용

◦ 사업지역 : 환경사업소 분뇨처리장

◦ 사업기간 : 2022. 2. ~ 4.

◦ 사 업 비 : 20백만원(시비100%)

◦ 사업내용 : 교반기 및 산기관 설치로 폭기시간 증가 시켜 총질소 저감

□ 추진계획

◦실험을 통한 자료 수집(실험실)                  : 2021. 9. ~ 12.

◦찌꺼기 및 협잡물 준설                         : 2022. 2. ~ 3.

◦교반기 및 산기관 설치                         : 2022. 3. ~ 4.

□ 소요재원 조성계획

(단위 : 백만원)

재원 구분	합계	기투자 (～‘21)	재원 투자계획					‘26년 이후	비고
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25
합 계	20		20	20
국 비
도 비
시 비	20		20	20
자부담

□ 행정절차 이행(계획)

용역과제 심의	사회보장협의	중기지방재정계획	지방재정투자심사	공유재산심의
×	×	×	×	×