2022년 신규사업 발굴 내역

상수도사업소

□ 2022년 신규사업 발굴 목록

(단위:백만원)

연번	사 업 명	사업 기간	총 사업비	2022년 사업비					비고
				계	국비	도비	시비	기타
	계		842	780		105	675
1	소규모 수도시설 스마트 관리 운영추진	2022	212	150		105	45
2	타 부서 병행 상수도 정비사업	2022	600	600			600
3	신규 전입세대 급수관 세척 지원	2022	30	30			30

소규모 수도시설 스마트 관리 운영추진

<상수도사업소 / 급수담당>

□ 필 요 성

◦ 마을주민들이 사용하는 수돗물의 수질개선과 안전한 시설관리가 필요함

◦ 소규모 수도시설물의 관리상태, 염소수치, 유입량, 수위 등 각종 데이터를 받아 통합적으로 운영할 수 있는 소규모 스마트 수도시설 관리체계 구축필요

	〈 현실태 및 현황 〉
◦ 1년간 8회정도 소독약 보충과 관말수 잔류염소 측정을 통해 소독약 투입 여부 확인 ◦ 각 마을마다 사용량이 상이하여 적절한 시기에 공급되고 있지 않아 수질관리에 어려움이 많음. ◦ 상단사진(소독약 잔량 많음), 하단사진(소독약 전량 소진)

□ 시설현황

◦ 시 설 명 : 소규모 수도시설(마을상수도, 소규모 급수시설)

◦ 위    치 : 남원시 관내(운봉읍 주촌마을외 70개지역)

◦ 대     상 : 소규모 수도시설 71개소(마을상수도 42, 소규모 급수시설 29)

※ 비상자동정지 및 알림장치 시범 운영 : 26개소 (잔여 20개소)

□ 사업계획

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 150백만원(도비 70%, 시비 30%)

◦ 사업대상 : 소규모 수도시설 46개소

◦ 사업내용 : 기존 비상자동정지 및 알림장치에 각종 설비를 추가한 소규모 수도시설 스마트관리 (시설물 보안시스템  재정비, 데이터 분석 장치, 소규모 수도시설 통합관리 시스템 연계 운영 등)

※ 소규모 수도시설 71개소중 광역상수도 공급 대상 25개소는 제외

□ 추진계획

◦ 2022년 광역상수도 전환마을 전수 조사후 계획수립         : ‘21. 9. ~ 12.

◦ 2022년 균특전환(지방이양) 도비보조금 교부신청     : ‘22. 2.

◦ 스마트 소규모 수도시설 확충 및 개량사업 추진         : ‘22. 2. ~ 6.

◦ 스마트 소규모 수도시설 운영 실시                 : ‘22. 7. ~

□ 소요재원 조성계획

(단위 : 백만원)

재원 구분	합계	기투자 (～‘21)	재원 투자계획					‘26년 이후	비고
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25
합 계	212	62	150	150
국 비
도 비	148	43	105	105
시 비	64	19	45	45
자부담

□ 행정절차 이행(계획)

용역과제 심의	사회보장협의	중기지방재정계획	지방재정투자심사	공유재산심의
X	X	X	X	X

타 부서 병행 상수도 정비사업

<상수도사업소 / 누수방지담당>

□ 필 요 성

◦ 타 부서 굴착 공사 추진 시 노후화된 상수관 교체 공사를 병행 추진하여 이중 굴착 방지·예산 절감·주민통행불편 해소

	〈 현실태 및 현황 〉
◦동일 구간에 여러 부서의 공사 추진 시 도로이중굴착, 재포장에 따른 예산 과다 소요 및 교통 혼잡 유발

□ 사업개요

◦ 사업지역 : 송동 태동, 주생 소지 ․ 대지, 함파우마을

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 600백만원(시비)

◦ 사업내용 : 노후 상수관 교체 L = 3.36㎞

- 송동 태동 1.08㎞ : 건축과 병행(생활여건 개조 사업)

- 주생 소지 ․ 대지 1.85㎞ / 함파우마을 0.43㎞ : 환경사업소 병행 (3차분 하수관거 정비)

□ 추진계획

◦ 실시설계용역 시행	: `21. 10. ~ 12.

◦ 도로점용(굴착) 협의 추진(부서간 일정 협의)	: `21. 11. ~ 12.

◦ 공사 발주 및 착수	: `22.  1. ~  2.

◦ 공사 추진	: `22.  3. ~ 10.

□ 소요재원 조성계획

(단위 : 백만원)

재원 구분	합계	기투자 (～‘21)	재원 투자계획					‘26년 이후	비고
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25
합 계	600	0	600	600	0	0	0	0	0
국 비
도 비
시 비	600		600	600
자부담

□ 행정절차 이행(계획)

용역과제 심의	사회보장협의	중기지방재정계획	지방재정투자심사	공유재산심의
×	×	×	×	×

신규 전입세대 급수관세척 지원

<상수도사업소 / 급수담당>

□ 사업개요

◦ 대    상 : 남원시 3년 이내 전입신고자 중 노후 건축물 주거자

◦ 기    간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 내   용 : 10년 이상의 건축물에 대한 급수관 청소 및 세척비용 지원                     (충격파 청소 및 스팀분사 50% 지원 / 최대 150만원)

◦ 소요예산 : 30백만원(시비)

※ 단, 공동주택(아파트, 연립주택 등) 및 공공건축물의 유지보수 등에 필요한 비용은 건축과에서 지원

□ 필 요 성

◦ 이미 타 시·군에서 급수관 세척에 관련한 사업비 지원이 시행되고  있으며 우리시에 귀농․귀촌 등 신규 전입 가구에 대하여 타시군으로의 인구유출을 방지하고자 함

◦ 현재 수돗물에서 녹물 및 기타 이물질 발생 관련 빈번한 민원 등으로  수돗물의 저하된 신뢰성을 향상 시킬 필요가 있음

□ 기대효과

◦ 신규 전입신고자의 수도설비를 개선함으로써, 수돗물의 신뢰성을 향상시키고 기존 자체 부담금을 일부 지원하여 경제적인 부담을 감소

◦ 지원사업 시 주기적인 유지관리 사항을 전달하여 보다 깨끗하고 안전한 수질공급에 기여

□ 추진계획

◦ 2022년 본예산 확보                          : ‘21. 10. ~

◦ 지원자 모집(홈페이지 및 읍면동 홍보)         : ‘22. 1. ~ 2.

◦ 사업시행(우선사업 대상자 선별)               : ‘22. 3. ~

□ 소요재원 조성계획

(단위 : 백만원)

재원 구분	합계	기투자 (～‘21)	재원 투자계획					‘26년 이후	비고
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25
합 계	30		30	30
국 비
도 비
시 비	30		30	30
자부담

□ 행정절차 이행(계획)

용역과제 심의	사회보장협의	중기지방재정계획	지방재정투자심사	공유재산심의
X	X	X	X	X