2022년도 국가예산확보 추진실적

기업지원과

□ 사업현황(총괄)

(단위 : 억원)

구 분	건수	총 사 업 비					국 비 요구액	부 처 반영액	기재부 반영액
		계	국비	도비	시비	기타
총 계	6	950.20	357.60	0.00	246.60	100.00	95.60	79.20	71.20
국가사업	2	196.5	54		33	100	9.5
국고보조	2	247.9	140		104		3.9
기 금
균 특	2	505.8	163.6		109.6		82.2	79.2	71.2
특 교 세

구 분	건수	총 사 업 비					국 비 요구액	부 처 반영액	기재부 반영액
		계	국비	도비	시비	기타
총 계	6	950.20	357.60	0.00	246.60	100.00	95.60	79.20	71.20
계속사업	5	877.7	303.6		237.6	100	86.1	79.2	71.2
신규사업	1	72.5	54		9		9.5
공모사업

산업단지 통근버스 임차 지원사업

【균특, 계속】

□ 개    요

◦ 위    치 : 광치·노암산업단지, 83기업/1,059명

◦ 사업기간 : 2020년 5월 ∼ 2022년 12월

◦ 사 업 량 : 6개 노선 / 6대(출·퇴근 운행)

◦ 총사업비 : 5.2억원(국비 3.6, 시비 1.6)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022이후	비 고
계	5.20	1.33	1.85	2.02
국 비	3.60	1.20	1.20	1.20
시 비	1.60	0.13	0.65	0.82

‘21 국비 요구액 : 1.2	부처 반영액 : 1.2	기재부 반영액 : 1.2

□ 추진실적

◦ 고용노동부 정부합동 공모사업 선정	: ʹ20. 3. 6.

◦ 전주지방 노동청 사업추진 실무협의 완료	: ʹ20. 3. 18.

◦ 통근버스 최초 운행	: ʹ20. 5. 29.

◦ 2020년 통근버스 수혜 기업체(대상자) 및 지원금액	: 7개 업체 / 113백만원

◦ 통근버스 운행 탑승자 수요조사	: ʹ21. 1. 4. ~ 1. 6.

◦ 통근버스 운행 사업자 선정 및 계약체결	: ʹ21. 1. 29.

◦ 통근버스 운행	: ʹ21. 2. 1. ~

◦ 통근버스 운행 상반기 만족도 조사 실시	: ʹ21. 7. 1. ~ 7. 7

□ 금후계획

◦ 통근버스 임차 지원사업 평가보고서 제출	: ʹ21. 11월중

◦ 통근버스 운행 하반기 만족도 조사 실시	: ʹ21. 12월중

화장품산업 공동훈련센터 지정

【국가사업, 신규】

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 노암동 867-2(화장품 지식산업센터 3층)

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2027년(6년)

◦ 사업내용 : 화장품 기업대상 화장품 기술분야 전문교육

◦ 총사업비 : 63억원(국비 54, 시비 9)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	63.00	0.00	0.00	11.00	52.00
국 비	54.00			9.5	44.5
도 비	0.00
시 비	9.00			1.5	7.5
기 타	0.00

‘22 국비 요구액 : 9.5	부처 반영액 : 추진중	기재부 반영액 : 추진중

□ 추진실적

◦ 인력양성 수요조사 신청서 제출                       : ʹ21. 3.

◦ 수요조사서 대면검토(인터뷰)(직업능력심사평가원)         : ʹ21. 4.

◦ 화장품 공동훈련센터 지정 타당성 검토(조건부 적합/ 고용노동부) : ʹ21. 5.

□ 금후계획

◦ 사업역량 진단 컨설팅 및 사업계획서 작성	: ʹ21. 8. ~ ʹ21.12

◦ 사업계획서 제출 및 현장실사·평가	: ʹ22. 1.

◦ 최종선정발표(한국산업인력공단)	: ʹ22. 2. ~ ʹ22. 3.

◦ 사업개시	: ʹ22. 3.

남원 코스메틱 비즈센터 건립

【균특, 계속】

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 노암동 867-2(노암산업단지 내)

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)

◦ 사업내용 : 화장품기업 임대형 지식산업센터 신축

◦ 총사업비 : 268억원(국비 160, 시비 108)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	268.00	28.00	104.00	136.00	0.00
국 비	160.00	25	54	81
도 비	0.00
시 비	108.00	3	50	55
기 타	0.00

‘22 국비 요구액 : 81	부처 반영액 : 78	기재부 반영액 : 70

□ 추진실적

◦ 지식산업센터 기본 및 실시설계 용역	: ʹ19. 12. ~ ʹ20. 10.

◦ 행정절차 이행 및 조달청 원가심사 및 입찰공고의뢰	: ʹ21. 2.

◦ 공사 및 감리용역 계약체결 및 착공	: ʹ21. 2. ~ 3.

◦ 지식산업센터 운영조례 제정	: ʹ21. 4.

□ 금후계획

◦ 지식산업센터 건축 골조 공사	: ~ ʹ21. 10.

◦ 지식산업센터 내부마감 및 유틸리티 장비 설치	: ʹ21.11. ~ ʹ22. 4.

◦ 지식산업센터 기업유치 추진(공고, 설명회, MOU 체결 등)	: ʹ21. 8.~

◦ 지식산업센터 준공 및 개관	: ʹ22. 6.

LX드론활용센터 구축 사업

【국가시업, 계속】

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 중동리 449번지 일원

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년(3년)

◦ 사업내용 : 테스트 베드(활주로, 이착륙장 등) 및 활용지원 시설 구축

◦ 총사업비 : 122억원(기타 100, 시비 24)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	124.00	0.00	30.00	94.00	0.00
국 비	0.00
도 비	0.00
시 비	24.00			24
기 타	100.00		30	70

‘22 국비 요구액 :	부처 반영액 :	기재부 반영액 :

□ 추진실적

◦ LX드론활용센터 구축사업 부지공모 선정	: ʹ20. 9.

◦ LX드론활용센터 구축을 위한 MOU체결(남원시·LX·전북도)	: ʹ21. 4. 15.

◦ 도시관리계획 결정(변경)「안」입안	: ʹ21. 6. 4.

◦ 도시계획결정 용역 수행	: ʹ21. 6. 16. 〜 11.

□ 금후계획

◦ 도시관리계획 시설결정 및 용도지역변경           : ʹ21. 10. ~ 12.

◦ 도시계획시설 실시계획인가 절차 이행              : ʹ21. 12. 〜 ʹ22. 1.

◦ 사유지 매입 및 국·공유지 매각                  : ʹ21. 11. 〜 ʹ22. 3.

◦ 남원시 지원사업 추진                             : ʹ21. 11. 〜 ʹ22. 12.

* 전선지중화사업(도시과), 상수도기반시설(상수도사업소), 하수도기반시설(환경사업소), 대체구거조성(농정과), 진입로개설(건설과)

남원 일반산업단지 하·폐수 재이용시설 설치

【국고보조, 계속】

□ 개    요

◦ 위    치 : 사매면 월평리 1109

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2025년(5년) [1단계 2021 ~ 2022년(2년)]

◦ 사 업 량 : 하·폐수처리수 재이용시설 325㎥/일(1단계 65㎥/일)

◦ 총사업비 : 31억원(국비 22억원, 시비 9억원)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022이후
계	31	-	4.00	27.00
국 비	22.00	-	3	19
시 비	9.00	-	1	8

‘22 국비 요구액 : 3.9	부처 반영액 : 미확정	기재부 반영액 : 미확정

□ 추진실적

◦ 2021년 하수도분야 국고보조사업 예산신청           : ʹ20. 3. 4.

◦ 2021년 환경부 소관 상수도 국고보조사업 예산 확정내시 : ʹ20. 12. 21.

◦ 기본 및 실시설계 용역 발주                        : ʹ21. 3. 8.

◦ 하·폐수처리수 재이용시설 기본 및 실시설계 용역 착수 : ʹ21. 5. 3.

□ 금후계획

◦ 하·폐수처리수 재이용시설 기본 및 실시설계 용역 준공  : ʹ21. 10. 29.

◦ 하·폐수처리수 재이용시설 설치사업(1단계) 준공      : ʹ21. 12.

◦ 하·폐수처리수 재이용시설 설치사업(2~4단계) 시행     : ʹ23. ~

남원 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치

【국고보조, 계속】

□ 개    요

◦ 위    치 : 사매면 월평리 1109

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2025년(8년) [1단계 2018 ~ 2021(4년)]

◦ 사 업 량 : 공공폐수처리시설 Q=2,000㎥/일 (1단계 400㎥/일)

◦ 총사업비 : 213억원(국비 118억원, 시비 95억원)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022이후
계	213	34.00	59.00	120.00
국 비	118.00	20	32	66
시 비	95.00	14	27	54

‘22 국비 요구액 : 미확정	부처 반영액 : 미확정	기재부 반영액 : 미확정

□ 추진실적

◦ 공공폐수처리시설 기본 및 실시설계용역 착수         : ʹ19. 7.  4.

◦ 공공폐수처리시설 폐수처리공법 선정                 : ʹ19. 12. 6.

◦ 공공폐수처리시설 설치사업(1차분) 착공               : ʹ20. 6. 25.

◦ 공공폐수처리시설 설치사업(1차분) 준공               : ʹ21. 3. 15.

◦ 공공폐수처리시설 설치사업(2차분) 착공               : ʹ21. 3. 16.

□ 금후계획

◦ 공공폐수처리시설 설치사업(1단계/3차분) 착수         : ʹ21. 8. 12.

◦ 공공폐수처리시설 설치사업(1단계) 준공	: ʹ21. 12.