2022년도 국가예산확보 추진실적

환경사업소

□ 사업현황(총괄)

(단위 : 억원)

구 분	건수	총 사 업 비					국 비 요구액	부 처 반영액	기재부 반영액
		계	국비	도비	시비	기타
총 계	8	545.05	363.62	10.19	171.25	0.00	177.92	132.59	132.59
국가사업
국고보조	8	545.05	363.62	10.19	171.25		177.92	132.59	132.59
기 금
균 특
특 교 세

구 분	건수	총 사 업 비					국 비 요구액	부 처 반영액	기재부 반영액
		계	국비	도비	시비	기타
총 계	8	545.05	363.62	10.19	171.25	0.00	177.92	132.59	132.59
계속사업	5	471.4	327		144.4		158.5	122.4	122.4
신규사업	3	73.65	36.62	10.19	26.85		19.42	10.19	10.19
공모사업

스마트 남원하수처리장 선도사업

【국고보조, 신규】

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원하수처리장

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2023년

◦ 사 업 량 : 계측기기 구성 / 스마트 감시시스템 / 처리시설 기능보강

◦ 총사업비 : 40.74억원(국비 20.37, 도비 10.185, 시비 10.185)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	40.74			20.37	20.37
국 비	20.37			10.185	10.185
도 비	10.185			5.0925	5.0925
시 비	10.185			5.0925	5.0925

‘22 국비 요구액 : 10.185	부처 반영액 : 10.185	기재부 반영액 : 10.185

□ 추진실적

◦ 기술진단(미생물 관리를 위한 계측·감시·제어 시스템 보강사업 제안)

◦ 스마트 하수처리장 사업 선정(환경부)             : 2021. 7월

◦ 스마트 하수처리장 사업 도비 요청               : 2021. 7월

◦ 하수처리장 자체 시설 전수조사(기계·전기·제어시스템 등)   : 2021. 7월 ~ 8월

□ 금후계획

◦ 스마트 하수처리장 벤치마킹(기계·전기·제어분야 등)  : 2021. 8월 ~ 9월

◦ 각 분야별 전문가 자문                            : 2021. 8월 ~ 9월

◦ 실시설계 추진                                    : 2021. 10월

◦ 사업 추진 협의(환경부)                            : 2021. 11월

◦ 공사 추진                                        : 2022. 3월 ~

공공하수처리장 신재생에너지 설치

【국고보조, 신규】

□ 개    요

◦ 위    치 : 4개소(남원, 운봉, 하도, 달궁 공공하수처리시설)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 10.

◦ 사업내용 : 태양광발전시설 300kW 설치(남원․운봉 200, 하도․달궁 100)

◦ 총사업비 : 7.26억원(국비 3.63, 시비 3.63)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	7.26			7.26
국 비	3.63			3.63
시 비	3.63			3.63

‘22 국비 요구액 : 3.63	부처 반영액 : 3.63	기재부 반영액 : 3.63

□ 추진실적

◦ 남원 처리장 태양광발전시설 설치 운영(145kW)	: 2019. 8월 ~

◦ 태양광발전시설 설치 가능 하수처리시설 조사	: 2021. 2월

◦ 2022년 신규사업 신청(환경부)	: 2021. 3월

◦ 운봉처리장 주변 농가 태양광 설치 협의          : 2021. 4월

◦ 남원처리장 외 3개소 현지 타당성 검토           : 2021. 7월

□ 금후계획

◦ 실시설계	: 2022. 2월 ~ 4월

◦ 착공 및 준공	: 2022. 5월 ~ 10월

소규모 마을하수처리시설 개량사업

【국고보조, 신규】

□ 개    요

◦ 위    치 : 보절면 괴양리 823-10 / 주펀면 고기리 536

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2023년

◦ 사 업 량

- (양촌,진목) 통합 개량사업(50㎥/일) 및 하수관로 설치(1.6km)

- (내기) 개량사업(30㎥/일)

◦ 총사업비 : 25.65억원(국비 12.62, 시비 13.03)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	25.65			13.07	12.58
국 비	12.62			5.60	7.02
시 비	13.03			7.47	5.56

‘22 국비 요구액 : 5.60	부처 반영액 : 5.60	기재부 반영액 : 5.60

□ 추진실적

◦ 마을주민 협의 및 부지매입	: 2020. 6월

◦ 2022년 신규사업 신청(환경부)	: 2021. 3월

◦ 처리용량 산정을 위한 유입인구 검토	: 2021. 6월

□ 금후계획

◦ 기본 및 실시설계	: 2022. 2월 ~

◦ 공법선정	: 2022. 9월

◦ 설치인가 및 재원협의	: 2022. 11월

◦ 착공 및 준공	: 2023. 2월 ~ 12월

일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업

【국고보조, 계속】

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 사매면 4개 마을 (덕평, 수월, 손율, 인화)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년 (2개년)

◦ 사 업 량 : 하수관로 L=6.4km, 배수설비 150여 가구

◦ 총사업비 : 58.7억원(국비 41.1, 시비 17.6)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	58.70	1.20	7.10	50.40	0.00
국 비	41.10		5.00	36.10
도 비
시 비	17.60	1.20	2.10	14.30

‘22 국비 요구액 : 36.1	부처 반영액 : 36.1	기재부 반영액 : 36.1

□ 추진실적

◦ 신규사업지구 신청                         : 2020. 4월

◦ 2021년 신규사업지구 선정                  : 2020. 12월

◦ 실시설계용역 추진	: 2020. 6월 ~ 2021. 9월

- 현장조사 및 설계서 작성

- 소규모환경영향성검토 시행

- 설계안정성검토 시행

- 환경부 재원협의를 위한 세부자료 작성추진

□ 금후계획

◦ 환경부 재원협의 및 행정절차 이행	: 2021. 9월

◦ 실시설계 완료	: 2021. 10월

◦ 공사착공	: 2021. 11월

◦ 전체사업 완료	: 2022. 12월

남원 노후 하수관로 정비 정밀조사

【국고보조, 계속】

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 일원

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년 (2개년)

◦ 사 업 량 : 노후 하수관로 정밀조사 L=208km

◦ 총사업비 : 15억원(국비 7.5, 시비 7.5)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	15.00		4.80	10.20
국 비	7.50		2.40	5.10
도 비
시 비	7.50		2.40	5.10

‘22 국비 요구액 : 5.1	부처 반영액 : 5.1	기재부 반영액 : 5.1

□ 추진상황

◦ 2021년 신규사업 신청(환경부)                         : 2020. 3월

◦ 2021년 신규사업 선정                                : 2021. 1월

◦ 정밀조사용역 발주 및 착수                           : 2021. 3월

- 2021년도 : 3개 지구 정밀조사 추진(도통, 금동, 향교처리구역)

□ 금후계획

◦ 2022년도 잔여지구 정밀조사 추진                     : 2022. 01월

- 동충, 죽항, 왕정, 월락, 조산, 월락, 소규모 처리구역

◦ 전체사업지구 조사완료                               : 2022. 10월

◦ 환경부 재원협의                                     : 2022. 11월

◦ 사업신청                                            : 2023. 3월

산내지구 하수관로 정비사업

【국고보조, 계속】

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산내면 5개 마을 (상황, 중황, 하황, 중기, 삼화)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년 (2개년)

◦ 사 업 량 : 하수관로 L=6.6km, 배수설비 280여 가구

◦ 총사업비 : 65억원(국비 45.5, 시비 19.5)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	65.00	1.50	3.60	59.90
국 비	45.50		2.50	43.00
도 비
시 비	19.50	1.50	1.10	16.90

‘22 국비 요구액 : 43.0	부처 반영액 : 43.0	기재부 반영액 : 43.0

□ 추진실적

◦ 신규사업지구 신청                         : 2020. 4월

◦ 2021년 신규사업지구 선정                  : 2020. 12월

◦ 실시설계용역 추진	: 2020. 6월 ~ 2021. 9월

- 현장조사 및 설계서 작성

- 소규모환경영향성검토 시행

- 설계안정성검토 시행

- 기존 하수관로 불명수 유입차단을 위한 기술진단 추진

□ 금후계획

◦ 환경부 재원협의 및 행정절차 이행	: 2021. 9월

◦ 실시설계 완료	: 2021. 10월

◦ 공사착공	: 2021. 11월

◦ 전체사업 완료	: 2022. 12월

아영인풍지구 하수관로 정비사업

【국고보조, 계속】

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 아영면, 인월면 일원 (12개 마을)

- 인월면(내건,외건,지산,연실,자래,덕실), 아영면(봉대,외인,내인,동갈,서갈,매산)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년 (4개년)

◦ 사 업 량 : 하수관로 L=15.4km, 배수설비 450여 가구

◦ 총사업비 : 160억원(국비 112, 시비 48)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	160.00	3.50	7.10	49.80	99.60
국 비	112.00		5.00	35.70	71.30
도 비
시 비	48.00	3.50	2.10	14.10	28.30

‘22 국비 요구액 : 35.7	부처 반영액 : 35.7	기재부 반영액 : 35.7

□ 추진실적

◦ 신규사업지구 신청                        : 2020. 4월

◦ 2021년 신규사업지구 선정                 : 2020. 12월

◦ 실시설계용역 추진	: 2020. 6월 ~ 2021. 10월

- 현장조사 및 설계서 작성

- 소규모환경영향성검토 시행

- 설계안정성검토 시행

- 환경부 재원협의를 위한 세부자료 작성추진(독립가옥 및 관로노선 확인 등)

□ 금후계획

◦ 환경부 재원협의 및 행정절차 이행	: 2021. 9월

◦ 실시설계 완료	: 2021. 10월

◦ 공사착공	: 2021. 11월

◦ 전체사업 완료	: 2024. 12월

남원처리구역 하수관로 확장사업

【국고보조, 계속】

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 9개 마을

- 신정동, 화정동, 한우물, 주생면(부동,상동,중동,소지,대지), 산동면(목동)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년 (4개년)

◦ 사 업 량 : 하수관로 L=16.2km, 배수설비 730여 가구

◦ 총사업비 : 172.7억원(국비 120.9, 시비 51.8)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	172.70	3.80	7.10	53.90	107.90
국 비	120.90		5.00	38.60	77.30
도 비
시 비	51.80	3.80	2.10	15.30	30.60

‘22 국비 요구액 : 38.6	부처 반영액 : 38.6	기재부 반영액 : 38.6

□ 추진실적

◦ 신규사업지구 신청                        : 2020. 4월

◦ 2021년 신규사업지구 선정                 : 2020. 12월

◦ 실시설계용역 추진	: 2020. 6월 ~ 2021. 10월

- 현장조사 및 설계서 작성

- 소규모환경영향성검토 시행

- 설계안정성검토 시행

- 환경부 재원협의를 위한 세부자료 작성추진(독립가옥 및 관로노선 확인 등)

□ 금후계획

◦ 환경부 재원협의 및 행정절차 이행	: 2021. 9월

◦ 실시설계 완료	: 2021. 10월

◦ 공사착공	: 2021. 11월

◦ 전체사업 완료	: 2024. 12월