2022년도 국가예산확보 추진실적

상수도사업소

□ 사업현황(총괄)

(단위 : 억원)

구 분	건수	총 사 업 비					국 비 요구액	부 처 반영액	기재부 반영액
		계	국비	도비	시비	기타
총 계	4	538.60	202.10	141.00	195.50	0.00	41.05	39.30	39.30
국가사업
국고보조	2	58.6	39.6		19		16.05	14.3	14.3
기 금
균 특	2	480	162.5	141	176.5		25	25	25
특 교 세

구 분	건수	총 사 업 비					국 비 요구액	부 처 반영액	기재부 반영액
		계	국비	도비	시비	기타
총 계	4	538.60	202.10	141.00	195.50	0.00	41.05	39.30	39.30
계속사업	2	376.6	198.6	32.5	145.5		39.3	39.3	39.3
신규사업	1	155		108.5	46.5
공모사업	1	7	3.5		3.5		1.75

운봉 제2배수지 및 송·배수관로 설치공사

【균특(지방이양),신규】

□ 필 요 성

◦운봉배수지 계통 농어촌생활용수 개발사업 지구 및 자연방사성물질       검출지구의 광역상수도 확대 공급 및 산내면 급수지역 확대에 따른       상수도 공급량 부족으로 제2배수지 신설 필요

◦신설 배수지 설치에 따른 급수체계 개선으로 효율적인 급수 공급

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 아영면, 산내면 일원

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2025년(4개년)

◦ 사업내용

- 배 수 지 : 신설 1개소(V=1,400㎥) / 아영면 당동마을(20억원)

- 송수관로 : L=12.1km(D250mm) / 동화댐 수자원공사관로 분기(50억원)

- 가 압 장 : 3개소 Q=2,630㎥/일 / 만항, 구선, 사치(6억원)

- 배수관로 : L=24.4km(D80~250mm) / 아영신설 배수지~산내면(64억원)

◦ 총사업비 : 155억원(도비 108.5, 시비 46.5)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	155	0.00	0.00	13	127
도 비	108.5	-	-	9.1	99.4
시 비	46.5	-	-	3.9	42.6

‘22 국비 요구액 : -	부처 반영액 : -	기재부 반영액 : -

□ 추진상황

◦ 남원시 수도정비기본계획(변경 수립)                :‘17. 1.

- 운봉배수지계통 아영배수지 신설 및 배수관로 계획 반영

◦ 기본 및 실시설계 시행                             :‘21. 9. ~‘22. 9.

□ 금후계획

◦ 배수지 및 송·배수관로 설치공사 시행                          :‘23. 1. ~‘25. 12.

월락정수장 태양광발전설비 설치

【국고보조, 공모】

□ 필 요 성

◦기후변화협약에 따른 온실가스 감축 및 미래 신성장 동력 산업으로서  지속가능 에너지시스템을 구축하며, 전기요금 절감효과가 있어 장기적  으로 볼 때 투자 비용대비 효과가 클 것으로 기대됨

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도통동 555번지 (월락정수장)

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2023년 (2개년)

◦ 사업내용 : 태양광 발전설비 설치 200kW

◦ 총사업비 : 7억원(국비 3.5, 시비 3.5)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	7.00	0.00	0.00	3.50	3.50
국 비	3.50	-	-	1.75	1.75
시 비	3.50	-	-	1.75	1.75

(단위 : 억원)

‘22 국비 요구액 : 1.75	부처 반영액 : 추진중	기재부 반영액 : 추진중

□ 추진상황

◦ 환경부 사업계획서 제출(환경 기초시설 탄소중립프로그램)       :‘21. 3.

◦ 환경부 현지실사                                      :‘21. 7.

□ 금후계획

◦ 태양광발전설비 설치공사 실시설계용역         :‘22. 1. ~ 6.

◦ 태양광발전설비 설치공사                      :‘22. 7. ~ ‘23. 11.

월락정수장 현대화 전면 개량사업

【균특, 계속】

□ 필 요 성

◦ 월락정수장은 1975년 준공되어 약 45년이 경과된 노후시설로 시설개량이        시급한 실정임

◦ 양질의 생활용수를 안정적으로 공급하여 주민생활 향상 도모를 위해       정수장 전면 개량사업 필요

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도통동 555번지 일원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2023년(5개년)

◦ 사업내용 : 정수장 시설 전면개량 Q=15,000톤/일

◦ 총사업비 : 325억원(국비 162.5, 도비 32.5, 시비 130)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	325	121.50	105.40	50	47.8
국 비	162	60.8	52.7	25	23.8
도 비	33	12.1	10.5	5	5
시 비	130	48.6	42.2	20	19

‘22 국비 요구액 : 25	부처 반영액 : 25	기재부 반영액 : 25

□ 추진상황

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행           :‘16. 12. 23. ~ ‘19. 11. 13.

◦ 건설사업관리용역 및 공사 착수        :‘19. 12. 4.

◦ 월락정수장 개량사업 1차분 준공       :‘20. 6.

◦ 월락정수장 개량사업 2차분 준공       :‘21. 5.

◦ 월락정수장 개량사업 3차분 착공       :‘21. 4.

⇒ ‘21년 8월 현재 사업진도 : 전체공정 36%

□ 금후계획

◦ 정수지 준공 및 시운전(여과지·정수지)           : ‘21. 10.

◦ 전체공사 준공                                  : ‘23. 11.

스마트 관망관리 인프라 구축사업

【국고보조, 계속】

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수구역

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2022(2개년)

◦ 사 업 량 : 정밀여과장치, 스마트 미터링, 소규모 유량·수압감시 시스템, 다항목 수질 계측, 자동 드레인 설비, 재염소 투입 설비 등

◦ 총사업비 : 51.6억원(국비 36.1, 시비 15.5)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	51.60	0.00	29.30	22.30	0.00
국 비	36.10		21.8	14.3
시 비	15.50		7.5	8.0

‘22 국비 요구액 : 14.3	부처 반영액 : 14.3	기재부 반영액 : 14.3

□ 추진실적

◦ 스마트 관망관리 기본계획 수립 용역 추진(환경부)	: `20. 1. ~ `21. 2.

◦ 2021년 환경부 상수도 국고보조사업 예산 확정 내시	: `20. 12. 21.

◦ 기본계획 확정 통보(전체 사업계획 확정)	: `21. 2.  1.

◦ 실시설계용역 착수	: `21. 3. 22.

◦ 환경부, 전북도청 출장 1차, 2차(국비 증액 지원)	: `21. 5. ~ 6.

- 타 지자체 사업비 감액 시 2022년도에 추가 반영 긍정 검토

◦ 2020년 시행 지자체 출장(전주 ․ 정읍)	: `21. 5. 12.

◦ 실시설계용역 중지(기술별 자재선정 및 운영방안 검토)	: `21. 8.  2.

◦ 벤치마킹 출장(세종 ․ 대전 외 2)	: `21. 8월

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 완료	: `21. 10.

◦ 1차분 사업 추진	: `21. 10. ~ 12.