2022. 1.

2022년 주요업무 계획

건   설   과

목        차

□ 일 반 현 황
□ 2021년 주요업무 결산
□ 2022년 중점 추진방향
□ 2022년 주요업무 계획
◦ 람천 지방하천 정비사업
◦ 겨울철 도로 제설대책 추진
◦ 읍면지역 안전한 도로망 확충 정비
◦ 읍면지역시도 정비현황
◦ 농어촌도로 정비현황
◦ 통행불편 마을진입로 정비현황
◦ 위험도로 선형개선
◦ 도로 유지관리사업
◦ 도로 재해복구사업
◦ 지방하천 정비사업
◦ 풍천 지방하천 정비사업
◦ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업
◦ 소하천 정비사업
◦ 하천 재해복구사업
◦ 하천 유지관리사업

일  반  현  황

□ 기    구

															건설과장
															박준기
건설행정담당													도로담당																		하천담당
													김 현 호
설해대책추진 도로 유지 관리․보수 도로 점‧사용 허가 국‧공유 재산관리 노점상‧과적 단속													읍면시도 확․포장사업 농어촌도로 확․포장사업 기업유치 기반시설 확충사업 통행불편 도로사업 도로 유지 관리사업																		치 수 사 업 하천유지관리 육상골재채취․허가 공유수면관리 하천점․사용허가

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	38	1	3	7	4	4	□청원경찰 : 1 □공무직 : 18
현 원	35	1	6	3	3	6	□청원경찰 : - □공무직 : 16
증 감	△3	-	3	△4	△1	2	△3

2021년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 지방재정 확충을 위한 국가예산 확보 총력 - 국도․국지도 건설 5개년 계획(`21 ~ `25) 5개 사업 중 4개 사업 반영(2,320억원) ․ 국도 24호선(이백 ~ 운봉 / 여원재) L=4.9㎞, 480억원 ․ 국지도 37호선(인월 ~ 아영) L=7.0㎞, 453억원 ․ 국지도 60호선(주천 호경 ~ 고기 / 육모정) L=5.9㎞, 941억원 ․ 국도 24호선(대강 ~ 대산 / 비홍재) L=4.0㎞, 446억원 ※『동부내륙권(정읍~남원)』구간 중, 국도 미지정 구간(임실 덕치~ 순창 동계~남원 주천) L=30.9㎞ 국도 지정(승격) / `21. 5. 13. - 순천~완주간 고속도로 춘향 휴게소 설치 사업 (공정률 40%) ․ 상하행 2개소, 300억원 / 건축물 외부공사(벽체, 지붕) 완료 - 자연재해에 안전하고 쾌적한 하천환경 조성을 위해, 지방하천 정비 사업 및 국가하천․지방하천․소하천 유지관리사업 국․도비 예산확보 (17,238백만원 / 국비 2,848, 도 12,990, 특․조 100, 특․교 1,300) ◦ 체계적인 도로망 개설로 지역 균형발전 도모 - 주민 실생활에 밀접한 도로망 확충으로, 농촌지역 주민 교통 편익 증진 및 정주여건 향상 도모 - 읍면지역시도(도산~서매), 농어촌도로(영촌선, 상황선), 통행불편 마을 진입로(주천 제바위, 아영 구지, 운봉 장동, 인월 장평, 이백 오산길) 도로 개설에 따른 지역경제 활성화 및 쾌적한 도로망 확충 ◦ 도로․하천 수해복구사업 조기 완공으로 주민 불편 최소화 - `20. 7. 28. ~ 8. 11. 집중호우에 따른 도로․하천 피해 복구 예산 확보 (521억원 / 국비 483억원, 도비 4억원, 시비 34억원) - 재해복구 86개 지구(도로 15, 하천 71) 중 81개 지구 완료 (복구율 94%) - 수해복구 누락분 72개지구(도로 11, 하천 61) 중 63개 완료 (복구율 88%)

◦ 시민 만족 중심의 도로·하천 유지관리 추진 - 도로 유지관리 : 16개 분야 / 129개소 / 7,170백만원 - 하천 유지관리 : 하도준설 및 잡목제거 45개소, 국가․지방하천, 소하천 유지관리 34개소 / 5,834백만원 - 법정 관리도로 총 57개 노선 431km에 대해 겨울철 제설작업, 노후포장도로 정비, 과속방지턱 정비, 도로안전시설물 설치 등 도로 유지관리 총력 - 민원사항 즉시처리 및 시설정비 예산우선 투자로, 도로․하천유지관리 만전 - 국가하천 스마트 홍수관리 시스템을 구축하여 배수문 자동화로 실시간 수문감시와 원격조작을 통한 우기철 안전사고 사전예방 (1,762백만원) ․ 국가하천 14개소(섬진강5, 요천9) 수문개량 및 계측제어 설비

□ 지역 균형발전을 위한 도로 개설 - 22개 지구 / 11,825백만원

◦ 읍면지역시도 확포장 3개 지구(L= 7.0㎞, 5,000백만원) / 1개지구 완공(L=1.9㎞)

◦ 농어촌도로 확포장   7개 지구(L=12.24㎞, 2,850백만원) / 2개 지구 완공(L=1.7㎞)

◦ 통행불편 마을진입로  9개 지구(L= 5.36㎞, 2,570백만원) / 6개 지구 완공(L=3.18㎞)

◦ 위험도로 선형개량    3개 지구(L= 2.1㎞,   1,405백만원) /  1개 지구 완공(L=1.1㎞)

□ 안전하고 쾌적한 도로 유지관리 – 17개 분야  155개소, 9,725백만원

◦ 읍면지역시도 유지관리

-  군도 29호선(아영면 소재지)등 33개소  2,100백만원

◦ 농어촌도로 유지관리

- 아영면 성리(농도 213호) 배수개선공사 등 34개소  950백만원

◦ 법정도로 유지관리(재포장 포함)

- 노암동 승사교 앞 (시도 3호) 아스콘 재포장 등 62개소  4,120백만원

◦ 도로재해복구사업

- 도로재해복구사업 15개소 2,242백만원, 수해복구누락 11개소 313백만원

□ 재해 사전 예방을 위한 하천 정비 - 201개 지구  /  78,119백만원

◦ 하천 정비 (지방하천, 소하천)	:  8개소 / 22,813백만원

- 지방하천 : 4개소 /  16,688백만원 (풍천, 원천천, 송치천, 다산천)

- 소 하 천 : 4개소  /   6,125백만원 (당동천, 오롱골천, 과립천, 산곡천)

◦ 하천 재해복구사업	: 132개소 / 49,546백만원

(국가하천 9개소, 지방하천 23개소, 소하천 35개소, 개선복구 4개소, 누락지구 61개소)

- 하천 재해복구사업 71개소 중 66개소 공사 완료 (복구율 93%) / 47,373백만원

- 수해복구 누락 61개소 중 52개소 공사 완료(복구율 90%) / 2,173백만원

◦ 하천 유지관리(지방하천, 소하천)	:  53개소 / 4,778백만원

◦ 하천 유지관리(국가하천 : 섬진강, 요천)	:  8개소 / 982백만원

□ 국가하천 스마트 홍수관리시스템 구축 - 1,762백만원

◦ 사 업 명 : 국가하천 스마트 홍수관리시스템 구축사업

◦ 위    치 : 남원시 국가하천(섬진강, 요천) 일원 (수문전동개량 14개소)

◦ 공사기간 : 2021. 3. 12 ~ 2021. 10. 14 (8개월)

◦ 사 업 비 : 1,762백만원 (국비)

◦ 사업규모 : 수문개량(전동화), 상황실 구축(시청 내), 통신망 연결

- 원격 자동계측·제어·감시, 현장제어, 영상표출, 기록시스템 등

	아쉬운 점
◦ 토지보상 협의 지연으로 적기사업 추진이 어려워 주민 통행불편 초래 ◦ 국도․국지도 내 시설보수, 선형개량, 회전교차로 설치 등 주민 민원 사항에 대해 유관기관(국토관리사무소, 도로관리사업소) 예산 상황으로 단기간 내 건의사항 처리가 어려운 실정임 ◦ 코로나-19 및 수해복구로 인한 하천사업추진 애로 발생

2022년 중점 추진방향

시민이 공감하는 안전한 도로‧하천 환경 조성

	중 점 추 진 과 제
◦ 생활 밀착형 SOC 시설물 확충 - 여가 ․휴식공간 제공을 위한 주요 도로 걷고 싶은 거리 조성 - 서 남 원 권 중 심 도 시 간 선 도 로 망 확 충 ◦ 안전중심 도로환경 - 신속한 제설작업으로 겨울철 안전한 도로 환경 제공 - 위험도로 구조개선으로 주민 생명권․재산권 보호 ◦ 체계적인 도로망 개설 - 환경적 여건 변화를 반영한 도로망 구축 - 시(군도) 및 농어촌도로 정비로 주민 소득기반 확충 ◦ 자연이 숨 쉬는 하천 - 기후환경 변화를 반영한 하천정비로 사전재해예방 - 미개수하천의 자연친화적 생태하천 조성 ◦ 안전한 재해복구 관리 - 철저한 항구복구로 2차 재난피해 사전 예방 - 수해복구공사 사후관리를 통한 주민불편 해소

2022년 주요업무 계획

람천 지방하천 정비사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 인월면 인월리 일원

◦ 사 업 량 : 하천정비 L=2.16㎞

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2023년(4개년)

◦ 총사업비 : 6,500백만원(도비 4,550, 시비 1,950) / `22년 1,000백만원(도700,시300)

□ 추진실적

◦ 람천 하천기본계획 수립ㆍ고시	: `12. 11. 09.

◦ 지방하천정비사업 종합정비계획 반영	: `16. 11.

◦ 실시설계용역착수 (전라북도)	: `20. 5. 11.

	< 용역 개요 >
○ 용 역 명 : 람천 지방하천 정비사업 실시설계 용역 ○ 용역기간 : 2020. 5. ~ 2021. 12. (20개월) ○ 과업내용 : 람천 지방하천 정비사업 실시설계 L=2.16㎞ ○ 발 주 처 : 전라북도 공항하천과(하천관리팀)

◦ 공공측량 작업계획 수립 및 측량작업 추진         : `20. 10. 20 ~

◦ 교량공법심의	: `21. 01. 18.

◦ 주민설명회(1차, 인월면사무소)	: `21. 03. 24.

◦ 주민설명회(2차, 인월면사무소)	: `21. 09. 15.

◦ 실시설계 완료(전북도)                             : `21. 12.

□ 금후계획

◦ 사업 발주(전체분 및 1차분)	: ‘21. 2. ~

- 편입용지 토지 협의 매수 병행 추진

◦ 시설공사 총괄분 준공                            : ‘23. 12. ~

겨울철 도로 제설대책 추진

(계속사업)

□ 개    요

◦ 운영 기간 : 2021. 11. 15. ~ 2022. 3. 15. (4개월간)

◦ 제설 대상

계		시 관리국도		지 방 도		시 도		읍면시도(군도)
노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량
57	431.5㎞	3	25.1㎞	8	154.9㎞	24	38.5㎞	22	213㎞

◦ 제설 인력 : 27명 (도로관리원 12, 운전원 9(자체 3, 용역 6), 기타 6(용역 6))

◦ 제설 차량 : 13대 (15톤 6(임차3), 5톤 2(임차1), 1톤 4(임차2), 굴삭기1)

◦ 제설 장비 : 282대

- 자체 보유 : 29대 (제설기 12, 살포기 14, 교반기 1, 저장탱크 1, 호이스트 1)

- 읍 면 동 : 253대 (트랙터용제설기 249, 1톤용 제설기 4)

◦ 제설자재

(단위 : 톤)

초 기 확 보 량				사 용 량				잔 량
계	염화 칼슘	제설용 소금	친환경 제설제	계	염화 칼슘	제설용 소금	친환경 제설제	계	염화 칼슘	제설용 소금	친환경 제설제
1,537	177	1,336	24	342	22	320	-	1,195	155	1,016	24

□ 추진실적

◦ 설해대책 추진계획 수립                        : `21. 10. 27.

- `20. 12월 ~ `21. 2월 도로 제설작업 추진 (12회)

◦ 제설자재 구입(1,009톤, 130.5백만원)완료        : `21. 09. 30. ~

- 제설용 소금 986톤(139백만원), 친환경 제설제 24톤(8.5백만원)

◦ 제설장비 점검 및 상습결빙지역 사전준비        : `21. 10.~ 11.

- 미끄럼주의표지판 28개소 및 모래주머니 20,000매 설치 완료

◦ 제설차량 임차 (6대 / 15톤 3대, 5톤 1대, 1톤 2대)  : `21. 12. 01. ~ `22. 2. 28.

◦ 정령치 도로 통제(고기삼거리 ~ 정령치 ~ 달궁삼거리)      : `21. 12. 01. ~ `22. 3. 31.

◦ 2021년 12월 도로 제설작업 추진(1, 17, 18)     : 3회

- 제설제 사용량 : 제설용 소금 320톤, 염화칼슘 22톤

◦ 2021년 겨울철 도로제설대책 유관기관 간담회 실시   : `21. 12. 21.

□ 금후계획

◦ 설해대책 상황실 운영 및 도로 제설작업 추진  : `21. 11.  ~ `22. 3.

◦ 예비 제설자재 구입 (친환경 제설제 등 740톤, 111백만원)    : `22 . 1 .

◦ 읍면동 트랙터용 제설기 보급(20대)              : `22 . 1 .

읍면지역 안전한 도로망 확충 정비

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업규모 : 도로 정비사업 18개 지구, L = 22.36㎞

◦ 총사업비 : 68,750백만원 (2022 : 6,700백만원 / 시비)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2028년(12개년)

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 량		총사업비 (국비)	기투자 (국비)	2022	2022이후	사업기간
계	18개지구	L=22.36㎞	68,750 (1,400)	18,863 (1,400)	6,700	43,187
읍면지역시도	3개지구	L=7.10㎞	25,800	9,913	2,400	13,487	`17~ `26
농어촌도로	6개지구	L=11.34㎞	34,350	3,900	3,150	27,300	`17~ `28
통행불편	5개지구	L=2.51㎞	4,800	1,950	1,050	1,800	`17~ `24
위험도로 선형개선	4개지구	L=1.41㎞	3,800 (1,400)	3,100 (1,400)	100	600	`17~ `23

□ 추진실적

◦ 읍면지역시도 : 완공(도산~서매), 공사 중(부석~오촌), 보상 중(평촌~강기)

◦ 농어촌도로   : 완공(영촌선, 상황선), 공사 중(도용선), 보상 중(호은선, 배촌선, 견두선,)

◦ 통행불편     : 완공(주천 제바위, 아영 구지, 운봉 장동, 인월 장평, 이백 오산길), 설계완료(송동 척동), 보상 중(인월 중군)

◦ 위험도로     : 완공(군도 29호), 공사 중(이백 초촌, 수지 호곡)

□ 금후계획

◦ 읍면지역시도 : `23년 완공(부석~오촌), `25년 완공(평촌~강기),

(3개 지구)      `26년 완공(덕촌~황벌)

◦ 농어촌도로   : `22년 완공(호은선, 도용선), `24년 완공(덕인선),

(6개 지구)      `25년 완공(배촌선, 일대선), `28년 완공(견두선)

◦ 통행불편     : `22년 완공(인월 중군, 덕과 추산, 인월 황이), `23년 완공

(5개 지구)      (송동 척동), `24년 완공(아영 이동)

◦ 위험도로     : `22년 완공(이백 초촌, 수지 호곡),

(4개 지구)      `23년 완공(주생 도산, 송동 문치)

읍면지역시도 정비현황

(계속사업)

□ 개    요

◦ 계    획 : 20개 지구 / 38.46㎞ / 78,130백만원 / 시비

◦ 기 투 자 : 17개 지구 / 31.36㎞ / 52,330백만원

◦ 시 행 중 :  3개 지구 /  7.10㎞ / 25,800백만원(2022 : 2,400백만원)

- `23 완공 : 1개 지구, `25 완공 : 1개 지구, `26 완공 : 1개 지구

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2026년(개년)

사 업 명		읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
				계	기투자	2022	2023이후
합 계		3개지구	7.10	25,800	9,913	2,400	13,487	48
부석~오촌		송동면	2.60	5,900	3,100	1,200	1,600	73	`17 ~ `23
평촌 ~ 강기	소 계		2.50	13,900	6,813	1,000	6,087	56	`17 ~ `25
	평촌 ~목가	이백면	0.70	6,413	6,413	-	-	100	`17 ~ `21
	목가 ~강기		1.80	7,487	400	1,000	6,087	19	`21 ~ `25
덕촌~황벌		보절면, 덕과면	2.00	6,000	-	200	5,800	3	`22 ~ `26

□ 추진실적

◦ 부석~오촌     : 3차분 완료(`21. 11. 05.) / 공정률 55%

◦ 평촌~강기

- 평촌~목가    : 공사 완료(`21. 4. 13.) / 공정률 100%

- 목가~강기     : 용지보상 추진(보상률 80%), 도로구역 결정(변경) 절차 이행 완료

□ 금후계획

◦ 2023년 완료   : 1개 사업(부석~오촌) / `22 장기계속 사업 추진

◦ 2025년 완료   : 1개 사업(목가~강기) / `22 용지보상 및 사업 추진

◦ 2026년 완료   : 1개 사업(덕촌~황벌) / `22 실시설계 용역 추진

농어촌도로 정비현황

(계속사업)

□ 개    요

◦ 계    획 : 26개 지구 / 30.45㎞ / 69,524백만원 / 시비

◦ 기 투 자 : 20개 지구 / 19.11㎞ / 35,174백만원

◦ 시 행 중 :  6개 지구 / 11.34㎞ / 34,350백만원(2022 : 3,150백만원)

- `22 완공 : 2개 지구, `24 이후 : 4개 지구

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2028년(23개년)

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2022	2023이후
합 계	6개지구	11.34	34,350	3,900	3,150	27,300	20
도 용 선	주생면	0.67	1,650	1,650	-	-	100	`17 ~ `22
호 은 선	주천면	0.90	1,500	100	1,400	-	100	`21 ~ `22
배 촌 선	주천면	3.77	9,600	1,400	800	7,400	23	`19 ~ `25
견 두 선	수지면	4.00	18,000	750	800	16,450	9	`18 ~ `28
덕 인 선	사매면	0.90	1,400	-	100	1,300	7	`22 ~ `24
일 대 선	아영면	1.10	2,200	-	50	2,150	2	`22 ~ `25

□ 추진실적

◦ 도 용 선   : 3차분 추진(배수공) / 공정률 70%(1필지 토지수용 절차 중)

◦ 호 은 선   : 실시설계용역 완료, 용지보상 협의 추진(보상률 50%)

◦ 배 촌 선   : 분할측량 및 보상계획 공고 완료 / 중송지구 `21. 6월 완료

◦ 견 두 선   : 실시설계용역 완료, 용지보상 협의 추진(보상률 33%)

□ 금후계획

◦ 2022년 완료 : 2개 지구(호은선) / `22 : 용지보상 및 공사시행(완공)

(도용선) /  `22 : 토지수용 재결 후, 공사완공 추진

◦ 2024년 완료 : 1개 지구(덕인선) / `22 : 실시설계용역 시행

◦ 2025년 완료 : 2개 지구(배촌선) / `22 : 용지보상 및 공사 발주

(일대선) / `22 : 실시설계용역 시행

◦ 2028년 완료 : 1개 지구(견두선) / `22 : 용지보상 및 공사발주

통행불편 마을진입로 정비현황

(계속사업)

□ 개    요

◦ 계    획 : 62개 지구 / 34.13㎞ / 34,736백만원 / 시비

◦ 기 투 자 : 49개 지구 / 28.53㎞ / 23,536백만원

◦ 시 행 중 : 5개 지구 /  2.51㎞ / 4,800백만원(2022 : 1,050백만원)

- `22 완공 : 3개 지구, `23 완공 : 1개 지구, `24 완공 : 1개지구

◦ 이후계획 : 8개 지구 / 3.09㎞ / 6,400백만원

◦ 사업기간 : 2008 ~ 2024년(17개년)

사 업 명	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
		계	기투자	2022	2023이후
5개 지구	2.51	4,800	1,950	1,050	1,800	63
인월 중군마을	0.78	1,950	1,950	-	-	100	`17 ~ `22
송동 척동마을	0.60	1,000	-	100	900	10	`21 ~ `23
덕과 추산마을	0.08	150	-	150	-	100	`22
인월 황이마을	0.50	700	-	700	-	100	`21 ~ `22
아영 이동마을	0.55	1,000	-	100	900	10	`22 ~ `24

□ 추진실적

◦ 공 사 완 료 : 5개 지구

(주천 제바위, 아영 구지, 운봉 장동, 인월 장평,  이백 오산길)

◦ 용지보상 중 : 1개 지구(인월 중군)

◦ 설 계 완 료 : 2개 지구(송동 척동, 이백 목가)

□ 금후계획

◦ 2022년 완료 : 3개 지구(인월 중군) / `22 : 용지보상 및 공사시행(완공)

(덕과 추산) / `22 : 실시설계용역 및 공사 발주

(인월 황이) / `22 : 용지보상 및 공사시행(완공)

◦ 2023년 완료 : 1개 지구(송동 척동) / `22 : 용지보상 추진

◦ 2024년 완료 : 1개 지구(아영 이동) / `22 : 실시설계용역 및 용지보상

위험도로 선형개선

(계속사업)

□ 개    요

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계 (국비)	기투자 (국비)	2022	2023이후
합 계	4개지구	1.41	3,800 (1,400)	3,100 (1,400)	100	600	84
이백 초촌	이백면	0.60	900 (450)	900 (450)	-	-	100	`20 ~ `22
수지 호곡	수지면	0.40	2,200 (950)	2,200 (950)	-	-	100	`19 ~ `22
주생 도산	주생면	0.23	400	-	50	350	12	`22 ~ `23
송동 문치	송동면	0.18	300	-	50	250	17	`22 ~ `23

□ 추진실적

◦ 이백 초촌	: 공사 추진(토공, 구조물공, 배수공) / 공정률 50%

◦ 수지 호곡	: 공사 추진(아스콘 기층 포설 완료) / 공정률 80%

□ 금후계획

◦ 2022년 완료 : 2개 지구(수지 호곡) / `22 : 공사완공(호곡 삼거리 회전교차로)

(이백 초촌) / `22 : 용지보상 및 공사추진(완공)

◦ 2023년 완료 : 2개 지구(주생 도산) / `22 : 실시설계용역 및 용지보상

(송동 문치) / `22 : 실시설계용역 및 용지보상

도로 유지관리사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 총사업비 : 9,778백만원(도비 232, 시비 9,546)

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비(백만원)	비 고
합 계		24개 분야	9,778
읍면지역시도	관 내	5개 분야	1,468
농어촌도로	관 내	4개 분야	1,540
법정도로 유지관리	관 내	15개 분야	6,770

□ 추진실적(2021년) - 16개 분야 / 129개소 / 7,170백만원

◦ 읍면지역시도 유지관리

- 군도 29호선(아영면 소재지) 외 1개소 외 32개소 2,100백만원 추진

◦ 농어촌도로 유지관리

- 아영면 성리(농도 213호) 배수개선공사 외 33개소 950백만원 추진

◦ 법정도로 유지관리(재포장 포함)

- 노암동 승사교 앞(시도 3호) 아스콘 재포장 외 61개소 4,120백만원 추진

※ `22년 사업 대상지 도로 일제점검 사항 전수조사 추진  : `21. 12

- 19개 읍면동 사업 신청 완료(113개소) : `21. 12. 10

□ 금후계획

◦ 도로 유지관리사업 실시설계용역 추진 : `21. 1. ~ 3 (공사발주 3 ~ 4월)

◦ 계속 사업지구 `22년 6월말 공사 완료

- 문오로 도로결빙예방, 사매~덕과 도로구조개선, 서남원I.C 회전교차로

승사교 교면 재포장공사)

□ 도로 유지관리사업 세부내역(2021년)

사 업 명		사업위치	사 업 량	사업비 (백만원)	비 고
합 계			16개 분야, 129개소	7,170
읍면지역시도 유지관리			4개 분야, 33개소	2,100
	시도유지관리	관내	유지관리사업 18개소	600	12월 완공 (연중시행)
	주민참여예산	관내	유지관리사업 13개지구(L=3.73㎞)	970	12월 완공
	노암 이뜰고개 인도 정비	노암동	인도 재포장 A=1,587㎡	80	6월 완공
	도로 결빙 예방사업	어현동 (문오로)	동결 억제 포장 L=0.34㎞	450	12월 완공
농어촌도로 유지관리			2개 분야, 34개소	950
	농어촌도로 유지관리	관내	유지관리사업 33개소	600	12월 완공 (연중시행)
	구일선 배수개선	아영면	도로 배수개선 L=0.23㎞	350	8월 완공
법정도로 유지관리			10개 분야, 62개소	4,120
	읍면지역 표지판 정비	관내	표지판 정비 1식	150	6월 완공
	교량 내진보강공사	이백․주송 ․축천교	내진보강 3개소	1,000	9월 완공
	법정관리 시설물 안전점검	관내	정밀안전점검 용역 9개소	150	5월 완공
	시특법 교량 보수보강공사	승사교	교면 재포장 A=4,560㎡	120	12월 완공 (실시설계중)
	사매~덕과 도로 구조개선	사매면, 덕과면	도로 시설개선 L=1.0㎞	600	11월 완공 (1차분)
	걷고 싶은 거리 조성	관내	인도 유지관리 6개소	100	12월 완공 (연중시행)
	교량(터널) 유지관리	관내	교량 보수보강 10개소	300	12월 완공 (연중시행)
	도로 유지관리보수	관내	유지관리사업 20개소	600	12월 완공 (연중시행)
	법정도로 재포장	관내	유지관리사업 10개소	600	12월 완공 (연중시행)
	서남원I․C 회전교차로 설치공사	송동면	회전교차로 설치 1식	500	`22. 5월 완공

□ 도로 유지관리사업 세부내역(2022년)

사 업 명		사업위치	사업량	사업비 (백만원)	비 고
합 계			24개 분야	9,778
읍면지역시도 유지관리			5개 분야	1,468
	시도유지관리	관내	유지관리사업 1식	500
	주민참여예산	L=3.19㎞	유지관리 사업 5개소	360
	소규모 민원 해결사업	L=0.76㎞	민원 해결 사업 5개소	170
	재해복구사업	L=0.15㎞	도로 재해복구 3개소	38
	아영초 인도 정비	아영면	인도 정비 L=0.37㎞	400
농어촌도로 유지관리			4개 분야	1,540
	농어촌도로 유지관리	관내	유지관리사업 1식	500
	이백초 인도 개설	이백면	인도 개설 L=0.22㎞, B=2m	400
	대산 심곡 교량 재가설	대산면	교량 재가설 1개소	500
	장용선 진입로 정비	주천면	도로 확포장 L=0.12㎞, B=4m	140
법정도로 유지관리			15개 분야	6,770
	읍면지역 표지판 정비	관내	표지판 정비 1식	100	총사업비 : 250
	시특법 교량 보수보강공사	주송교	차량용 안전난간설치 L=400m	150
	사매~덕과 도로 구조개선	사매면, 덕과면	도로 시설개선 L=1.0㎞	700	총사업비 : 1,300
	법정관리 시설물 안전점검	관내	정밀안전점검 용역 1식	150	도 32 시 118
	아영 매산 스노우멜팅공사	아영면	도로 열선설치 L=0.24㎞	240	도 60 시 180
	회전교차로 설치사업	월락동	월락삼거리 회전로 설치 1식	500	도 140 시 360
	시특법 교량 보수보강공사	승사교	교면 재포장 A=4,560㎡	1,480
	교량(터널) 유지관리	관내	교량 유지보수(시특법 8개소)	300
	교량 내진보강공사	요천2교	교량받침교체 100개	700
	걷고 싶은 거리 조성	관내	인도 유지관리사업 1식	200
	도통아파트 앞 인도정비	도통동	인도 재포장 L=0.58㎞, B=3m	350
	도로 유지관리보수(동지역)	관내	유지관리사업 1식	500
	법정도로 재포장	관내	유지관리사업 1식	500
	요천마을 배수로 정비공사	식정동	배수로 정비 L=0.11㎞	200
	밤티재길(뒷밤재) 정비공사	광치동, 사매면	도로 정비 L=3.3km(인도확보)	700

도로 재해복구사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 관내 도로

◦ 사 업 량 : 법정도로 15개소

◦ 복구내역

(단위 : 백만원)

구 분	개소	피해액	복 구 액				비 고
			계	국비	도비	시비
계	15	775	2,242	1,454	100	688
군도ㆍ농어촌도	9	403	1,254	1,254	-	-	국 100%
시 도	4	228	588	-	-	588	시 100%
시관리 지방도	2	144	400	200	100	100	국 50%, 도 25%, 시 25%

※ 수해복구 누락지구 추진 □ `21년 : 11개 지구, L=517m, 313백만원(시비)

□ `22년 :  3개 지구, L=144m, 38백만원(시비)

□ 추진실적

◦ 응급복구공사 추진(시비)	: `20.  8. ~ 10.

- 지방도 및 시관리 도로 20개소 / 132백만원

◦ 수해복구 실시설계 용역 추진	: `20.  9. 24.

◦ 호우피해 복구예산 교부결정	: `20. 10. 26.

- 추경예산 성립전 사용 승인(`20. 11. 17.)

◦ 도로 수해복구공사 발주 완료	: `20. 12. ~ `21. 5. 14.

◦ 공사 완료(13개 지구)                          : `21.  5.

- 광치동(포도원), 고죽동, 금지 귀석, 주생 지당, 이백 양가, 대강 섬진로,

대강 남원터널, 덕과 신양, 주천 용궁, 어현동(문오로), 대산 풍촌,

수지 호곡, 주천 송치

※ 2개 지구(이백 효기, 금지 입암) : 하천 재해복구 병행 추진

◦ `21년 재해복구 누락지구 공사완료(송동 용투산로 외 10개소) : `21.  12.

□ 추진계획

◦ `22년 도로 재해복구 누락지구 공사 추진       : `22. 2. ~ 5.

- 주천 고기 외 2개 지구 (38백만원)

지방하천 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 아영면 풍천 외 2개소

◦ 사업기간 : 2012 ~ 2023년(12개년)

◦ 총 계 획 : 21개 지구 / 98.43㎞ / 190,771백만원

- 완료지구 : 15개 지구 / 48.79㎞ / 123,612백만원

(송내천, 내척천, 괴양천, 진기천, 백암천, 운교천, 풍천, 요천, 수외천, 수지천, 주촌천, 갈치천, 람천, 송치천, 다산천)

- `22년 사업 : 3개 하천 / 10,000백만원(도비 7,000, 시비 3,000)

하천별	지구별	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계 (국도비)	기투자 (국도비)	2022 (도비)	2023이후 (도비)
합 계	5개 하천	25.1	85,128 (59,148)	57,202 (39,624)	10,000 (7,000)	17,926 (12,524)	78
람 천	인월지구	2.16	6,500 (4,550)	-	1,000 (700)	5,500 (3,850)	15	`22 ~ `23
풍 천	소 계	5.50	37,351 (26,146)	28,308 (19,840)	5,000 (3,500)	4,043 (2,806)	89	`14 ~ `23
	청계지구	0.88	6,961	6,961	0	0	100	`17년준공
	풍천지구	4.62	30,390	21,347	5,000	4,043	86	`18 ~ `23
원천천	신촌~주천	13.70	23,583 (16,508)	11,200 (7,840)	4,000 (2,800)	8,383 (5,868)	69	`17 ~ `23
송치천	주천송치	2.04	9,966 (6,626)	9,966 (6,626)	-	-	100	`16 ~ `21
다산천	덕과만도	1.70	7,728 (5,318)	7,728 (5,318)	-	-	100	`18 ~ `21

□ 추진실적

◦ 풍  천(인월·두락·의지) : 3차분 추진 중 (취암교 재가설 등)	/ 공정률 62%

◦ 원천천 : 2차분 추진 중(신촌인도교, 내촌1교 가설 등)      / 공정률 47%

◦ 송치천 : 타절잔여분 공사완료(`21. 8월)	/ 공정률 100%

◦ 다산천 : 전체분 공사완료(`21. 11월)                  /  공정률 100%

◦ 람  천(인월지구) : 실시설계완료(`21. 12월) - 전북도

□ 금후계획

◦ 2023년 완료 : 2개 지구(풍  천, 원천천, 람  천)

- 2022년 람천 신규사업 발주

풍천 지방하천 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 아영면 일대리 ~ 남원시 인월면 취암리 지내

◦ 사 업 량 : 하천정비 L=5.53㎞

◦ 사업기간 : 2014 ~ 2023년(10개년)

◦ 총사업비 : 37,351백만원(균특 8,027, 도비 18,142, 시비 11,182)

- `22년 5,000백만원 (도비 3,500, 시비 1,500)

□ 추진실적

◦ 청계지구 준공	: `14.  5. 26. ~ `17.  7.  9.

◦ 서무~취암구간 (인월지구) 실시설계 용역 추진	: `16.  4. 12. ~ `17.  1. 30.

◦ 풍천지구 통합실시설계 용역 추진	: `18.  4.  6. ~ `18. 10. 30.

◦ 풍천지구 경제성 등 검토(VE) 용역 추진	: `18.  4. 27. ~ `18.  8. 24.

◦ 풍천지구 문화재지표조사 용역 추진	: `18.  2. 22. ~ `18.  8.  3.

◦ 지방건설기술 심의 개최	: `18.  9. 11.

◦ 시 계약심의위원회심의 개최	: `18.  9. 28.

◦ 풍천 지방하천 정비공사(총괄분) 시행      : `18. 10. 4.

⇒ 조달청 원가심사 및 공사 발주 의뢰

◦ 낙찰자 선정 및 계약(조달청)               : `18. 12. 19.

※ 낙찰업체 : (주)장한종합건설(대표 소재철)

◦ 풍천지구(1차분) 공사 준공	: `19. 12. 23.

※ 하천정비(두락지구) L=1.2km, 교량2개소(의지교, 두락교) 등

◦ 풍천지구(2차분) 공사 준공	: `20.  3. 13. ~ 21. 9. 7.

※ 하천정비(인월지구) L=2.1km, 교량1개소(취암교) 등

◦ 풍천지구(3차분) 공사 추진	: `21.  5. 25. ~ 22. 5. 20.

※ 하천정비(인월지구) L=2.1km, 교량1개소(취암교) 등

□ 금후계획

◦ 시설공사 3차분 추진 및 준공	: ‘21. 5. ~ ‘22. 5.

- 편입용지 토지 협의 매수 병행 추진

◦ 시설공사 총괄분 준공	: ‘23. 6.

원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도통동 인도교 ~ 주천면 고기리 일원

◦ 사 업 량 : 관광자원화 친수공간 조성 L=13.7㎞

- 축제 2.78km, 호안 5.16km, 자전거길 6.6㎞, 보․낙차공 12개소, 교량 9개소 등

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2023년(6개년)

◦ 총사업비 : 23,583백만원(국비 1,600, 도비 14,908, 시비 7,075)

- `22년 4,000백만원 (도비 2,800, 시비 1,200)

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진                          : ‘16.  9. 28.

◦ 용역 중간보고회 개최(시장)	: ‘18.  8.  3.

◦ 주민설명회 개최	: ‘18. 11. 29.

◦ 설계VE 완료(총사업비 100억원 이상 건설공사)         : ‘19.  5.  3.

◦ 지방건설기술심의(전북도)                            : ‘19.  9. 23.

◦ 조달청 원가심사 및 공사발주 의뢰                    : ‘19. 10.  8.

◦ 실시설계(안) 총사업비 변경 협의(3차) 승인 / 익산청    : ‘19. 11.  4.

- 사업비 : 당초 MP상 18,821백만원 → 23,583백만원(증 4,762 / 증 25.3%)

◦ 시설공사 도급업체 선정 및 착수                      : ‘19. 12. 23.

※ 낙찰업체 : (주)영록건설 (대표 서오성)

◦ 시설공사 1차분 준공	: ‘21. 02. 03.

- 주천면 고기리, 덕치리 구간 호안 정비, 종단교 신설 등

◦ 시설공사 2차분 착공	: ‘21. 03. 04.

- 신촌인도교 재가설, 내촌1교 신설 등

□ 금후계획

◦ 시설공사 2차분 추진 및 준공	: ‘21. 03. ~ ‘21. 12.

- 편입용지 토지 협의 매수 병행 추진

◦ 시설공사 총괄분 준공	: ‘23. 12.

소하천 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 총  계 획  : 30개 지구 / 20.78㎞ / 44,511백만원

(`19년까지 국비 50%지원, `20년부터 균특지방이양 시비 100%)

- 완료 지구 :  8개 지구 /  7.43㎞ / 23,112백만원

(뒤하천, 율치천, 율정천, 아곡천, 신동천, 장교천, 고평천, 오롱골천)

-  `22년 사업 : 3개 지구 /   5.85㎞ / 7,152백만원 / 시비

◦ 위     치 : 아영면 당동천 외 2개소

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2023년 (8개년)

지구별	위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2022	2023이후
합 계	4개 하천	6.67	24,515	13,119	7,152	4,244	83
당동천	아영 봉대	2.69	10,711	7,759	2,952	-	100	`18~ `22
과립천	이백 과립	1.88	4,348	1,160	1,600	1,588	63	`20~ `23
산곡천	향교동	1.28	7,106	1,850	2,600	2,656	63	`20~ `23
오롱골천	운봉 주촌	0.82	2,350	2,350	-	-	100	`19~ `21

□ 추진실적

◦ 당  동  천 : 3차분 추진 (호안정비 L=0.6km) 및 교량 2개소 등	/ 공정률 65%

◦ 과  립  천 : 1차분 추진(과립 2교) 및 토지보상 병행 추진	/ 공정률 20%

◦ 산  곡  천 : 1차분 추진(호안 L=0.35km) 및 토지보상 병행 추진	/ 공정률 10%

◦ 오롱골천 : 전체분 공사 완료(`21. 11월)	/ 공정률 100%

□ 금후계획

◦ 2022년 완료 : 1개 사업(당동천)

◦ 2023년 완료 : 2개 사업(과립천, 산곡천)

하천 재해복구사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 132개지구 / 49,546백만원

◦ 위    치 : 국가하천 조산지구 외 131개소

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2022년 (3개년)

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	비 고
합 계(71개소)	47,373	46,837	268	268
국가하천(9)	2,765	2,765	-	-	남원시 대행사업
지방하천(23)	8,294	7,832	231	231	-
소하천(35)	5,313	5,239	37	37	-
개선복구(지방하천,2)	19,848	19,848	-	-	주촌천, 효촌천
개선복구(소하천,2)	11,153	11,153	-	-	감동천, 서당천

※ 수해복구 누락지구 추진 □ `21. 61개 지구 / L=3.52km / 2,173백만원(시비)                             □ `22. 10개 지구 / L=0.8.km /  360백만원(시비)

□ 추진실적

◦ 하천 응급복구공사 추진(시비)	: ‘20.  8. ~ 10.

- 37개소 / 396백만원(예비비)

◦ 재해복구사업 실시설계 용역 추진	: ‘20.  9. 11. ~

- 11건 / 884백만원

◦ 피해 복구액(국·도비) 확정	: ‘20.  9. 24.

◦ 예산 성립전 사용승인(13,045백만원)	: ‘20. 11. 17.

◦ 개선복구사업 실시설계 용역 추진	: ‘20. 11. 25. ~

◦ 재해복구사업 공사 추진	: ‘20. 12.  7. ~

- 재해복구사업 71개소 중 66개소 공사완료, 5개소 공사 추진 중(복구율 93%, 복구액 47,373백만원)

◦ 수해피해 신고 누락지구 공사 추진(61개소)	: ‘21.  6. ~ 12.

- 수해복구 누락 61개소 중 52개소 공사완료, 9개소 공사 추진 중(복구율 90%, 복구액 2,173백만원)

□ 금후계획

◦ 하천 개선 ‧ 기능복원사업(5개소) 공사완료	: ‘22. 6.

◦ 수해복구 누락지구 권포천 외 9개 지구 사업추진	: ‘22. 2. ~ 6.

하천 유지관리사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 소하천‧지방하천‧국가하천 일원

◦ 사 업 량 : 3개사업 / L =109.095km

◦ 사 업 비 : 5,956백만원 (국비1,319, 도비 1,000, 시비 3,637)

◦ 사업기간 : 2022년

구 분	사업내용	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
합 계	3개 사업	109.1	5,956	(국비: 1,319) (도비: 1,000) (시비: 3,637)
하천 유지관리사업	하천 유지관리	15.0	600	(시비)
	하천 하도준설	20.0	500	(시비)
	하천 소규모시설 숙원사업	0.81	305	(시비)
	주민참여예산	3.76	952	(시비)
	소규모 민원해결	0.63	280	(시비)
기성제 유지관리사업	지방하천 기성제 정비	30.0	2,000	(도비: 1,000) (시비: 1,000)
국가하천 유지보수사업	섬진강, 요천 유지관리	38.9	1,319	(국비: 1,319)

□ 추진실적

◦ 읍·면·동 하천 유지관리사업 대상지 제출 및 현지조사	: ‘20. 12. 1.

【 하천 및 기성제 유지관리사업 】

◦ 하천유지관리사업 추진	: ‘21. 1. ~ 12.

- 하도준설 완료 / 이백면 백암천 외 26개소(L=15.95km)

- 유지관리 완료 / 운봉읍 권포천 외 18개소(L=2.12km)

- 주민참여예산사업 완료 / 광치동 율치소하천 외 6개소(L=1.35km)

【 국가하천 유지보수사업 】

◦ 시특법 관리대상 배수문 2개소 정밀점검 용역 완료	: ‘21. 2. 22.

◦ 국가하천 자전거도로 및 시설물 유지보수사업 추진	: ‘21. 1. ~ 12.

- 국가하천 자전거도로 유지관리사업 외 7개소(L=15.42㎞)

□ 금후계획

◦ 2022년 하천유지관리사업 및 하도준설사업 실시설계 및 공사추진	: ‘22. 1. ~ 11.

- 공사추진 : 관내 하천(지방하천·소하천) 유지관리 및 하도준설

◦ 국가하천(섬진강,요천) 유지관리사업 실시설계 및 공사추진	: ‘22. 1. ~ 11.

- 공사추진 : 관내 하천(국가하천) 유지관리 및 하도준설