2022. 1.

2022년 주요업무 계획

환 경 사 업 소

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2021년 주요업무 결산

□ 2022년 중점 추진방향

□ 2022년 주요업무 계획

◦ 요천생태습지 공원 관리

◦ 스마트 하수처리장 사업

◦ 남원(3단계) 하수관로 정비사업

◦ 남원처리구역 하수관로 확장사업

◦ 아영 인풍지구 하수관로 정비사업

◦ 산내지구 하수관로 정비사업

◦ 남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업

◦ 남원처리장 운영 및 시설개선

◦ 하수처리장 태양광 발전설비 설치사업

◦ 소규모 마을하수처리시설 개량사업

◦ 마을하수도시설 보강사업 추진

일  반  현  황

□ 기    구

									환경사업소장
									왕 길 성
하수경영담당					하수시설담당								하수처리담당										마을하수담당
박 병 준					문 인 구								박 기 정										문 하 성
∘행정 종합계획 수립 ∘공공 시설물 관리 ∘공기업 특별회계 운영 ∘요천생태습지공원 관리 ∘하수도 요금 부과징수 ∘빗물이용시설 관리					∘하수도 중장기계획 수립 ∘하수관거정비 사업 추진 (노후,남원3단계,용전,서도 등) ∘오수중계펌프장 관리 ∘배수설비 설치신고 및 관리 ∘하수도 원인자 부담금 부과징수								∘하수처리 종합계획 수립 ∘남원하수처리장 운영 ∘분뇨처리시설 운영 ∘슬러지 등 탄화시설 운영 ∘음식물폐기물 처리시설 운영 및 관리										∘운봉·인월 하수처리장 관리 ∘소규모 마을하수처리장 관리 (노후시설 개량사업 등) ∘낙동강수계 기금관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	22	1	4	5	6	6	청 경 2 환경관리원 3 공 무 직 4
현 원	21	1	9	5	4	2	청 경 2 환경관리원 3 공 무 직 4
증 감	△1	-	5	-	△2	△4

□ 하수처리시설 현황

총 64개소 (500㎥/일 이상 3개소, 500㎥/일 미만 61개소)

구 분	시설용량(㎥/일)	처리방법	비 고
남원하수처리장	50,000	심바이오공법
운봉하수처리장	800	회분식활성슬러지공법
인월하수처리장	1,000	회분식활성슬러지공법
소규모하수처리장	4,143	질소인고도처리 외 17개 공법	61개소

1. 남원하수처리장 현황

구 분	최 초	1차 증설	2차 증설
시설용량(㎥/일)	50,000	50,000	50,000
처리방법	표준활성슬러지법	심바이오	인제거장치
준공일자	1995.11.4.	2009.11.30.	2012.6.30.
부지면적(㎡)	34,980	36,505	36,505

2. 운봉· 인월 하수처리장 현황

구 분	운봉하수처리장	인월하수처리장
시설용량(㎥/일)	800	1,000
처리방법	회분식활성슬러지공법	회분식활성슬러지공법
준공일자	2006.5.30.	2006.5.30.
부지면적(㎡)	3,735	3,616

□ 요천 생태습지공원 현황

위치	조성 규모	준공일자	주요시설
주생면 중동리 1297	145,298㎡	2014.12.01.	생태탐방로, 야구장, 다목적구장, 애견놀이터, 모정 등

2021년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 하수도시설 지속적인 확충 및 유지관리 ◦ 하수처리 노후시설물 개선 및 최적운영으로 청정하천 수질보전 ◦ 하수처리장과 연계한 생태습지공원 운영·관리

□ 하수처리시설 효율적인 운영 및 시설 정비로 하천 수질 보전

◦ 방류수 수질기준 준수를 위한 운전관리 강화 : 공정별 특성에 따른 설비개선 및 취약요인 해소

◦ 하수처리 공정 개선 및 고도화로 안정적 수질관리 : 하수처리 노후시설 개선 및 개선된 처리공정 도입으로 하수처리 성능 향상

◦ 하수의 적정처리로 주민 공중위생 향상 및 하천수질 개선

□ 하수관로 정비 및 차집관로 성능개선으로 불명수 차단

◦ 강우 시 유량급증, 동절기 하수온도 저하 등 합류식 관로의 취약요인으로 발생되는 문제점 해결

◦ 차집관로의 주기적인 준설과 구조개선으로 불명수 차단

◦ 농촌지역 주거환경 개선 및 개인하수처리시설 설치비 부담경감

□ 마을하수처리장 시설개선 및 관리강화로 안정적 운영

◦ 공정의 추가, 고장․노후시설의 수리 등 시설의 보수 및 개선

◦ 집중관리 시설 전문인력 투입으로 최적화 운영 등 처리효율 향상

◦ 노후시설 개량을 통한 쾌적한 생활환경 조성 및 소하천 수질개선 기여

□  공기업 효율적 운영 및 시민 휴식 공간 제공

◦ 요금현실화, 국비보조금 확보 등 적극적인 재원 마련 및 투자 재원의 계획적 배분을 통한 효율적인 재정 운영

◦ 주민편익 제공을 위한 요천생태습지공원 이용시설 보강 및 애견놀이터 연장운영

2022년 중점 추진방향

안정적 생활하수처리 및 효율적 공기업 운영

	중 점 추 진 과 제
◦ 친환경 하수관리로 청정 수질 보전 - 하수도시설 지속적인 확충 및 유지관리(하수도 보급률 2022년 94%달성) - 강우시 안정된 하수 수집·이송·처리능력 확보 - 효율적 하수도 서비스로 시민불편 해소 ◦ 완벽한 생활하수처리 - 방류수 수질기준준수 (64개소) - 남원·운봉·인월·소규모 하수처리장 안정적 운영관리 ◦ 공기업 특별회계 효율적 운영 - 지방공기업(하수도) 경영평가를 통한 효율적인 운영 - 투명하고 효율적인 공기업특별회계 운영 및 공개

2022년 주요업무 계획

요천생태습지공원 관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2022. 12월(연중)

◦ 총사업비 : 280백만원

◦ 관리인력 : 2명(환경관리원 1, 시설관리원 1), 공공근로 상시배치

◦ 사업내용 : 화단 조성, 잔디식재, 쉼터조성, 애견놀이터 운영

□ 추진실적

◦ 공원 휴게시설 및 취사구간 활성화	: 2021. 6.

- 휴게시설 주변 취사허용구간 조성 (3,000㎡), 음수대 1개소(6구형) 설치

- 잔디식재 작업 (3,460㎡), 병꽃나무 식재작업(1200주), 그네벤치 2개소 구입

◦ 안전시설 보수 및 설치공사	: 2021. 12.

- 안전울타리 110경간(220m) 설치, 산책로 보수 15개소 (310㎡)

- 요천생태습지공원 습지부 태양광 가로등 설치 (3개소)

◦ 애견놀이터 운영관리

- 연장운영(06:00 ~ 21:00)	: 2021. 3. ~ 10.

□ 추진계획

◦ 힐링 및 휴식공간으로 공원 환경 조성

- 잔디보식/30,000천원, 관목 및 초화류 식재/30,000천원

◦ 시민공원으로서의 역할 제고

- 태양광 가로등 설치/30,000천원, 탐방로 보수 및 모정 파라솔 보수/20,000천원

◦ 공원의 다양한 생태계 유지

- 습지부 주변 준설작업/20,000천원, 낚시 등 금지 조치

스마트 남원하수처리장 사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 요천로 1036-207(남원하수처리장)

◦ 총사업비 : 4,074백만원(국비 2,037, 도비 1,018, 시비 1,019)

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2023년(2개년)

◦ 사업내용

- 정보통신기술(ICT)·인공지능(AI) 기반 감시·제어시스템 도입

- 첨단 계측·제어장비 구성

- 처리시설 기능보강

(유입펌프 오버홀, 내부반송펌프 설치, 분뇨처리시설 협잡물처리기 교체 등)

□ 추진실적

◦ 스마트 하수처리장 사업 신청 및 선정    : ‘20. 9월 ~ ‘21. 7월

◦ 스마트 하수처리장 벤치마킹 실시(김제, 여주)  : ‘21. 8월

□ 금후계획

◦ 수질개선을 위해 필요한 시설보강 및 지능화시스템 구축 병행 실시

(환경부 방침 : ICT·AI·첨단 계측을 통한 하수처리시설의 지능화시스템 구축)

◦ 실시설계 용역 완료                     : ‘22. 4월

◦ 환경부 재원협의                        : ‘22. 5월 ~ 6월

◦ 공사착공 및 준공                       : ‘22. 7월 ~ ‘23. 12월

※ 하수처리 운영 의사결정 지원체계를 위한 빅데이터 수집과 병행

남원(3단계) 하수관로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원처리구역 및 운봉처리구역

◦ 사업내용

- 남원처리구역 : 오수관로 설치 L=31.7km, 배수설비 1,763가구

- 운봉처리구역 : 오수관로 설치 및 개량 L=15.2km

◦ 사 업 비 : 37,818백만원(국비 22,128, 시비 15,690)

※ 2022년 사업비 : 10,967백만원(국비 317, 시비 10,650)

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역시행	: 2017. 11월 ~ 2019. 3월

◦ 공사착공                                 : 2020. 2월 ~

- 공 정 율 : 61% (2021. 12월 현재)

(하수관로 38.8km 중 31.3km완료, 배수설비 1,760가구 중 1,268가구 완료)

□ 금후계획

◦ 공사추진 방향

▷ 시내지역 우선완료 계획으로 공사추진

- 동충동, 왕정동, 향교동, 용정동 등

▷ 타사업 중복구간, 기 굴착구간 우선시행 마무리 (광치, 식정, 주천 송치, 행정 등)

▷ 현장 및 민원관리를 위해 매주 1회 공정회의 시행 (감리단, 시공사)

▷ 현장관리(안내간판, 안전시설물 점검)를 위해 매주1회 합동현장점검 시행

◦ 전체사업 완료	: 2023. 12월

남원처리구역 하수관로 확장사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 일원 (9개 마을)

- 신정동, 화정동, 한우물, 주생면(부동,상동,중동,소지,대지), 산동면(목동)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=16.2km, 배수설비 730여 가구

◦ 총사업비 : 17,270백만원(국비 12,089, 시비 5,181)

※ 2022년 사업비 : 1,601백만원 (국비 1,156, 시비 445)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년 (4개년)

□ 추진실적

◦ 신규사업지구 신청                         : 2020. 4월

◦ 2021년 신규사업지구 선정                  : 2020. 12월

◦ 실시설계용역 추진	: 2020. 6월 ~ 2021. 12월

- 현장조사 및 설계서 작성

- 소규모환경영향성검토 시행

- 설계안정성검토 시행

□ 금후계획

◦ 환경부 재원협의 및 행정절차 이행	: 2021. 12월

◦ 원가심사(조달청) 및 계약의뢰               : 2022. 01월

◦ 공사착공	: 2022. 03월

◦ 전체사업 완료                             : 2024. 12월

아영 인풍지구 하수관로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 아영면, 인월면 일원 (12개 마을)

- 아영(봉대,외인,내인,매산,서갈,동갈), 인월(덕실,연실,자래,외건,내건,지산)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=15.4km, 배수설비 450여 가구

◦ 총사업비 : 16,000백만원(국비 11,200, 시비 4,800)

※ 2022년 사업비 : 1,508백만원 (국비 1,175, 시비 333)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년 (4개년)

□ 추진실적

◦ 신규사업지구 신청                         : 2020. 4월

◦ 2021년 신규사업지구 선정                  : 2020. 12월

◦ 실시설계용역 추진	: 2020. 6월 ~ 2021. 12월

- 현장조사 및 설계서 작성

- 소규모환경영향성검토 시행

- 설계안정성검토 시행

□ 금후계획

◦ 환경부 재원협의 및 행정절차 이행	: 2021. 12월

◦ 원가심사(조달청) 및 계약의뢰               : 2022. 01월

◦ 공사착공	: 2022. 03월

◦ 전체사업 완료	: 2024. 12월

산내지구 하수관로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산내면 일원 (5개 마을)

- 산내면(상황, 중황, 하황, 중기, 삼화)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=6.6km, 배수설비 280여 가구

◦ 총사업비 : 7,865백만원(국비 5,506, 시비 2,359)

※ 2022년 사업비 : 5,522백만원 (국비 3,922, 시비 1,600)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년 (3개년)

□ 추진실적

◦ 신규사업지구 신청                         : 2020. 4월

◦ 2021년 신규사업지구 선정                  : 2020. 12월

◦ 실시설계용역 추진	: 2020. 6월 ~ 2021. 11월

◦ 환경부 재원협의 완료                      : 2021. 12월

▷재원협의 결과

사 업 명	총사업비	재원협의전(당초)	재원협의결과(변경)	증△감	비고
산내지구 하수관로 정비사업	계	5,689	7,865	증 2,176
	국비	3,982	5,506	증 1,524
	시비	1,707	2,359	증 652

□ 금후계획

◦ 원가심사(조달청) 및 계약의뢰               : 2022. 01월

◦ 공사착공                                  : 2022. 03월

◦ 전체사업 완료                             : 2023. 12월

남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 사매면 일원 (4개 마을)

- 사매면(손율, 수월, 덕평, 인화)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=6.4km, 배수설비 150여 가구

◦ 총사업비 : 5,025백만원(국비 3,518, 시비 1,507)

※ 2022년 사업비 : 1,768백만원 (국비 1,237, 시비 531)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년 (3개년)

□ 추진실적

◦ 신규사업지구 신청                         : 2020. 4월

◦ 2021년 신규사업지구 선정                  : 2020. 12월

◦ 실시설계용역 추진	: 2020. 6월 ~ 2021. 11월

◦ 환경부 재원협의 완료                      : 2021. 12월

▷재원협의 결과

사 업 명	총사업비	재원협의전(당초)	재원협의결과(변경)	증△감	비고
남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업	계	2,482	5,025	증 2,543
	국비	1,737	3,518	증 1,781
	시비	745	1,507	증 762

□ 금후계획

◦ 원가심사(조달청) 및 계약의뢰               : 2022. 01월

◦ 공사착공                                  : 2022. 03월

◦ 전체사업 완료                             : 2023. 12월

남원하수처리장 운영 및 시설개선

(계속사업)

□ 개    요

◦ 시설용량 : 50,000톤/일, 처리공법 : Symbio공법

◦ 처리개요 : 생활하수, 분뇨, 침출수 및 음식물류 폐기물의 병합처리

◦ 수질관리항목 : 총 6항목(BOD, TOC, SS, T-N, T-P, 총대장균군수)

◦ 슬러지 처리 : 탄화처리(처리시설 민간위탁 관리)

□ 추진실적

◦ 철저한 수질관리로 방류수질기준 준수

(단위 : ㎎/L, 개)
항목 구분	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균군수	비고
유입수	133.8	80.25	148.5	41.275	3.910	98,376
방류수 / 기준	2.1 / 5	9.31 / 20	4.7 / 10	15.714 / 20	0.084 / 0.3	37 / 1,000

◦ 음식물 병합처리 : 음식물류 폐기물 20톤/일(총 5,737톤) 처리

□ 금후계획

◦ 정기적인 실험 데이터 분석을 통한 최적의 하수처리 시스템 운영

- 실험 데이터를 기반으로 공정별 운영요원 토론회 실시    : 1회/주

- 유입하수의 계절별․시간대별 수질분석 데이터 자료 구축 : 1회/분기

◦ 연중 실시간 수질 모니터링 운영시스템 가동

- 물환경보전법 개정에 따른 TOC측정기기 설치              : ‘22. 1월 ~ 6월

- 24시간 상시 모니터링으로 안정적인 방류수질 확보

◦ 음식물 탈리액의 총질소(T-N) 저감방안 추진

- 분뇨처리장 여분의 지(地)를 활용한 저감시설 설치  : ‘22. 1월 ~ 6월

- 총질소 저감효율 변화 추이 확보를 위한 기획실험 실시 : 연중 수시

◦ 시설물 점검·정비, 개선으로 안정적인 처리시설 운영

- 처리시설 점검(매주), 구조물 안전점검(년2회), 시설정비

하수처리장 태양광 발전설비 설치사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 대    상 : 4개소(남원, 운봉, 달궁, 용전)

◦ 사업기간 : 2022년도

◦ 총사업비 : 726백만원(국비 363, 시비 363)

◦ 사업내용 : 태양광 발전설비 300kW 설치

□ 추진실적

◦ 태양광 발전설비 설치 가능 시설 조사	: ‘21. 02.

◦ 운봉처리장 주변 농가 태양광 설치 협의	: ‘21. 04.

◦ 현지 조사 및 타당성 검토(환경부)	: ‘21. 07.

□ 금후계획

◦ 기본 및 실시설계 용역	: ‘22. 01. ~ 04.

◦ 공사 감리 선정	: ‘22. 04.

◦ 공사 착공 및 준공	: ‘22. 05. ~ 10.

□ 기대효과

◦ 태양광 청정에너지 분야에 투자하여 이산화탄소 저감

시설명 (처리장)	시설용량 (㎥/일)	월 전기요금 (천원)	발전용량 (kW)	월 생산금액 (천원)	설치년도	에너지비율 (%)
계		43,850	545	6,442		15
남원	50,000	40,000	245	2,878	‘10. 01.(‘19. 08.)	10
			100	1,188	‘22. 08.
운봉	800	1,745	100	1,188	‘22. 08.	68
달궁	490	1,495	50	594	‘22. 08.	40
용전	200	610	50	594	‘22. 08.	97

소규모 마을하수처리시설 개량사업

(신규, 계속사업)

□ 개    요

시설명	내 용	총사업비	사업기간	비고
계		2,591백만원 (국944, 시1,647)
보절면 양촌(진목)	·양촌(진목) 통합개량(Q=50㎥/일) ·하수관로 신설(L=1.6km)	1,000백만원 (국300, 시700)	2022~2023	신규사업
주천면 내기	·전면 개량(Q=30㎥/일)	467백만원 (국140, 시327)	2022~2023	신규사업
운봉읍 비전	·전면 개량(Q=60㎥/일)	1,124백만원 (국504, 시620)	2020~2022	계속사업

□ 추진실적

◦ [비전] 기본계획 부분변경(위치, 용량) 승인	: ‘21. 01.

➣ 처리용량 : (당초) 30㎥/일 ⇒ (변경) 60㎥/일

➣ 처리구역 : (당초) 비전 ⇒ (변경) 비전, 전촌, 화신, 군화동

◦ [비전] 공법선정 및 행정절차 이행	: ‘21. 05. ~ 11.

➣ 총사업비 변경 : (당초) 253백만원(국30%) ⇒ (변경) 1,124백만원(국45%)

➣ 당초(30㎥) 보조율 30%, 신설(30㎥) 보조율 70%

□ 금후계획

◦ [양촌] 양촌(진목)처리장 병합처리 관련 주민협의	: ‘22. 01.

◦ [비전] 주민대상 사업설명회 및 공사 착공 안내	: ‘22. 02.

- 국악의 성지 주변 건축물과 조화롭게 조성

◦ [내기] 유입하수 부하변동에 따른 수질개선 실시설계	: ‘22. 04.

- 유량조정조, 생물반응조 용량 대비 확대설계

- 소규모 마을하수 및 중계펌프 시설 -

마을 하수도시설 보강사업 추진

(계속사업)

□ 개    요

◦ 시설현황 : 132개소(공공하수처리시설 64개소, 중계펌프장 68개소)

◦ 사업기간 : 2022년도

◦ 총사업비 : 513백만원

◦ 사업내용

- (처리시설) 자동스크린 설치 4개소(대산 대곡, 보절 도촌, 아영 일대․광평)

- (중계펌프) 원격감시제어 구축 12개소, 모터제어반 교체 2개소

□ 추진실적

◦ 마을 하수처리시설 기술진단(4개소, 42백만원)	: ‘21. 03. ~ 06.

- 하수도법 제20조 50㎥/일 이상 시설물(기계,전기) 보수 및 수질개선

◦ 마을 하수처리시설 내진성능평가(43개소, 221백만원)	: ‘21. 03. ~ 07.

- 지진․화산 재해대책법에 따른 내진성능평가 실시로 내진보강은 없음

◦ 구원천(폐쇄) 처리장 철거(60백만원)	: ‘21. 11. ~ 12.

- 신설 원천처리장(250㎥/일) 설치에 따른 구원천처리장 폐쇄

◦ 수해복구사업 완료(8개소, 3,608백만원)	: ‘21. 11.

□ 금후계획

◦ 구용전(폐쇄) 처리장 철거(65백만원)	: ‘22. 02. ~ 03.

- 신설 용전처리장(200㎥/일) 설치에 따른 구처리장 철거

◦ 금지 중계펌프장 원격감시제어 구축(12개소, 180백만원)	: ‘22. 02. ~ 04.

◦ 용산, 동천 중계펌프장 모터제어반 교체(2개소, 100백만원)	: ‘22. 02. ~ 04.

◦ 자동스크린(드럼, 세목) 설치(4개소, 146백만원)	: ‘22. 02. ~ 05.

◦ 원천, 방동 처리장 기술진단(2개소, 22백만원)	: ‘22. 03. ~ 05.