도 시 과

□ 2021년도 명시․사고 이월사업 추진상황

(단위 : 천원)

구분	사 업 명	예산액	집행액	이월액	추진상황 및 금후계획
총 합 계		25,624,629	17,872,233	7,493,031
명시	소 계	1,793,516	190,170	1,540,346
	도시재생 인정사업 (시설비 및 부대비)	432,000	190,170	178,830	◦실시설계용역 추진 : `21. 12. ~ `22. 06. ◦구)미도탕 문화저장소 리뉴얼사업 추진 : `22. 07. ~ `23. 12.
	금암공원 조성사업 (2단계사업)	1,100,000	-	1,100,000	∘ 2단계사업 착공 :‘22. 04.(설계중) ∘ 까페전망대 건축공사 착공 :‘22. 03.
	왕정공원 숲속야영장 조성	261,516	-	261,516	∘ 숲속야영장 행정협의 중(환경청), 조성계획 승인(전라북도) :‘22. 04. ∘ 숲속야영장 착공 :‘22. 04.
사고	합 계	23,831,113	17,682,063	5,952,685
	도시 기본계획 수립 용역 (연구용역비)	444,000	437,340	6,660	◦도시기본계획 국토계획평가 추진 : ‘22. 03.중 ◦도시기본계획 전라북도 도시계획심의 추진 : ‘22. 04. ◦도시관리계획(재정비) 도시계획위원회 자문 : ‘22. 05. ◦도시관리계획(재정비) 도 도시계획위원회 심의 : ‘22. 06.
	도시 기본계획 수립 용역 (시설비)	154,000	68,230	68,235	◦도시관리계획(재정비) 전략환경영향평가 추진 : ‘22. 06. ◦불용액 17,535천원
	지리산IC 진입도로 개설공사 (시설비 및 부대비)	1,594,240	1,137,875	456,365	◦표층포장, 감압변실, 회전교차로 추진중 (년내 완공 예정)
		5,760	5,580	180
	교룡대로 개설공사 (시설비 및 부대비)	1,450,790	1,403,591	47,199	◦공사완료 ◦관급자재(가로등,아스콘 등) 검수예정
		5,241	2,961	2,280
	신정대로 개설공사 (시설비 및 부대비)	993,700	977,439	16,261	◦공사완료 ◦관급자재(가로등,아스콘 등) 검수예정
		6,300	5,300	1,000
	금암길 개설공사 (시설비 및 부대비)	1,798,237	1,698,435	99,802	◦표층, 교량교면 포장 추진 (년내 완공 예정) ◦관급자재(가로등,아스콘 등) 검수예정
		4,320	2,050	2,270
	식정 우회도로 개설공사 (시설비)	998,000	594,189	403,811	◦도로구역결정(전라북도) 추진 ◦토지보상 추진 (38% 완료 109필지중 41필지 보상)
	만인로 중로 개설공사 (시설비 및 부대비)	993,700	943,090	50,610	◦도로 및 인도 포장완료 ◦부대시설물 추진중 (년내 완공예정)
		6,300	3,650	2,650
	가방뜰길 중로 개설공사 (시설비 및 부대비)	1,165,788	713,714	452,074	◦상·하수도 완료, 보조기층 추진 (년내 완공 예정)
		4,212	1,992	2,220
	호치길 도로 정비공사 (시설비 및 부대비)	996,400	945,302	51,098	◦보조기층 포설, 도로 포장 추진 (년내 완공 예정)
		3,600	2,740	860
	내척길 확포장 공사실시설계용역 (시설비)	70,000	67,079	2,921	◦설계완료 및 토지보상협의 추진
	안전한 보행환경 조성사업 (시설비 및 부대비)	1,202,932	926,339	276,593	◦한전주 철거 및 교통안전시설 추진
		4,068	3,018	1,050
	인월1길 지중화사업 (시설비 및 부대비)	660,678	253,477	407,201	◦도로 포장, 교통안전시설 추진 (년내 완공 예정)
		4,188	3,058	1,130
	인월 서무1길 소로 개설공사 (시설비 및 부대비)	675,716	439,508	236,208	◦관급자재(레미콘, 아스콘)검수예정 ◦도로 포장 추진 (6월중 완공예정)
		4,284	2,954	1,330
	서문3길 소로 개설공사 (시설비 및 부대비)	993,700	839,606	154,094	◦도로 포장 추진 (년내 완공 예정)
		6,300	4,340	1,960
	장기미집행 도시계획시설(도로) 해소관련 보상 (시설비 및 부대비)	2,423,700	1,595,995	827,705	◦장기미집행 도로 토지보상 추진
		6,300	6,200	100
	도시재생 인정사업 (시설비 및 부대비)	432,000	190,170	63,000	◦구)미도탕 문화저장소 리뉴얼사업 실시설계용역 추진 - 착공일 : `21. 12. 14. - 준공예정 : `22. 06.
	근린재생형 (도시재생사업) (시설비)	2,516,804	2,435,301	81,503	◦사랑나눔어울림센터 조성공사 (전기, 통신, 소방) 사업완료 - 착공일 : `21. 10. 08. - 준공예정 : `22. 03. 08.
	도시재생 활성화 (시설비 및 부대비)	1,500,000	1,211,207	288,793	◦사랑나눔어울림센터 조성공사 (건축공사) 사업완료 - 착공일 : `21. 10. 18. - 준공일 : `22. 02. 14.
	도시재생 뉴딜사업 (연구용역비)	30,000	15,000	15,000	◦모니터링용역(1차분) 추진 - 착수일 : `21. 12. 17. - 준공예정 : `22. 04. 15.
	금암공원 조성사업 (1단계 2차분)	2,429,938	708,580	1,721,358	∘ 2차분 완료예정 :‘22. 05.
	금암공원 인도교 야간경관조명 설치사업	176,905	36,753	140,152	∘ 인도교 설치 후 재착공예정 :‘22. 04.
	금암공원 조성사업 공중화장실 BF인증용역	14,000	-	14,000	∘ 예비인증 심의 후 본인증 예정 :‘22. 08.
	금암공원 조성사업 전기공사(CCTV)	11,247	-	11,247	∘ 사업완료 :‘22. 02.
	금암공원 조성사업(2단계) 실시설계용역(1차분)	2,500	-	2,500	∘ 용역완료 :‘22. 01.
	왕정공원 산림욕장 조성사업(전기,관급)	41,265	-	41,265	∘ 전기공사 사업완료 :‘22. 02. ∘ 탄성포장(관급) 예정 :‘22. 04.