안전재난과

□ 2021년도 명시․사고 이월사업 추진상황

(단위 : 천원)

구분	사 업 명	예산액	집행액	이월액	추진상황 및 금후계획
총 합 계		1,737,659	418,834	1,318,825
명시	합 계	100,000	0	100,000
	이백 내기마을 배수로 정비공사	100,000		100,000	◦‘22. 3. 26. 준공예정
사고	합 계	1,637,659	418,834	1,218,825
	자동기상관측시설 구매□설치	87,710		87,710	◦‘22. 2. 28. 준공 ◦‘22. 3월 집행예정
	운봉읍 자동기상관측시스템 노후장비 구입 교체	9,845		9,845	◦‘22. 2. 28. 완료 ◦‘22. 3월 집행예정
	풍촌 재해위험개선지구 소규모 환경영향평가 용역	42,548		42,548	◦‘21. 12. 14. 용역중지(실시설계 미완료에 따른 보고서 작성 지연)
	주천 장안 세천 정비사업	140,007		140,007	◦‘22. 1. 5. 준공 ◦‘22. 1. 27. 지급완료
	산동 대촌 세천 정비사업	178,795	71,000	107,795	◦‘22. 1. 17. 준공 ◦‘22. 1. 27. 지급완료 ※ 관급자재 ‘22. 3월 집행예정
	소규모 위험시설 정비공사 편입토지 보상금	7,731		7,731	◦‘22. 5월 집행예정
	대곡 농로 소규모공공시설 정비사업 실시설계용역	9,990		9,990	◦‘22. 2. 21. 준공
	대산 뱀골 세천 정비사업 실시설계용역	9,100		9,100	◦‘22. 2. 21. 준공
사고	산내 덕동 소교량 정비사업 실시설계용역	9,990		9,990	◦‘22. 1. 24. 용역중지(지리산 국립공원 전북사무소 협의 지연) ◦‘22. 3월말 준공예정
	수지 마륜 세천 정비사업 실시설계용역	9,990		9,990	◦‘22. 2. 23. 준공
	아영 봉대 소교량 정비사업 실시설계용역	8,950		8,950	◦‘22. 2. 23. 준공
	아영 율동 세천 정비사업 실시설계용역	9,990		9,990	◦‘22. 2. 23. 준공
	이백 내기 소교량 정비사업 실시설계용역	9,990		9,990	◦‘22. 2. 15. 용역중지 (토지협의 지연) ◦‘22. 3월말 준공예정
	이백 효기 소교량2 정비사업 실시설계용역	9,990		9,990	◦‘22. 2. 15. 용역중지 (토지협의 지연) ◦‘22. 3월말 준공예정
	제바위 세천 정비사업 실시설계용역	4,400		4,400	◦‘22. 2. 21. 준공
	주천 내용궁 세천 실시설계용역	9,990		9,990	◦‘22. 2. 21. 준공
	주천 외용궁 세천1 정비사업 실시설계용역	6,600		6,600	◦‘22. 2. 21. 준공
	주천 웅치언덕길 농로 정비사업 실시설계용역	9,000		9,000	◦‘22. 2. 15. 용역중지 (사업지구변경) ◦‘22. 3월말 준공예정
	이백 효촌 세천 정비사업 실시설계용역	5,630		5,630	◦‘22. 3. 7. 준공예정
	소규모 위험시설 정비사업	12,735	10,834	1,901	◦ 부대비 집행 예정
사고	남원시 소규모 공공시설 안전점검및정비계획수립용역(2차분)	481,450	337,000	144,450	◦‘22. 1. 26. 준공 ◦‘22. 2. 17. 지급완료
	운봉 권포천 재해위험 정비사업	225,096		225,096	◦‘22. 1. 17. 준공 ◦‘22. 1. 27. 지급완료 ◦ 집행잔액‘22. 3월 중 집행예정
	금지 금정마을 펌프장 정비공사	104,511		104,511	◦‘21. 12. 30. 공사중지(동절기) ◦‘22. 5월 준공예정
	금지 호산마을 배수시설 정비공사 시행	195,771		195,771	◦‘22. 1. 25. 공사중지(동절기) ◦‘22. 5월 준공예정
	지역현안사업	2,304		2,304	◦ 부대비 집행 예정
	2020.7.28.~8.11 호우피해 침수주택 신축 대상자 재난지원금 지급	16,000		16,000	◦ 침수주택 신축 준공 완료 후 지급
	대곡 자연재해 위험개선지구 신규 지정을 위한 타당성조사 및 기본계획 수립용역	9,766		9,766	◦‘22.2.28. 지정고시
	주촌지구 자연재해위험개선지구 타당성조사 및 기본계획 수립용역	9,780		9,780	◦‘22. 6월 지정고시 예정