환 경 과

□ 2021년도 명시․사고 이월사업 추진상황

(단위 : 천원)

구분	사 업 명	예산액	집행액	이월액	추진상황 및 금후계획
합 계		23,014,187	14,425,162	5,159,392
명시	소 계	6,557,394	2,394,541	2,376,359
	운행경유차 배출가스 저감사업 (LPG화물차)	560,000	372,000	188,000	∘ LPG화물차 대상자 (44대 / 176,000천원)상반기 내 집행예정 - 지급완료 (17대 /68,000천원) - 상반기 내 지급 (27대 /108,000천원) ∘ 사업공고 및 대상자 선정 (4월중 / 6대 12,000천원) ※ 1대당 4,000천원(‘21), 2.000천원(‘22)
	전기이륜차 보급사업	36,000	29,950	3,450	◦지침 시달 후 시행예정
	어린이 통학차량 LPG 전환사업	35,000	0	35,000	◦선정완료(상반기 내 집행예정/ 5대)
	가정용 저녹스 보일러 보급사업	26,000	25,900	100	◦집행 완료
	소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	1,350,000	862,889	68,508	◦선정검토(1), 설치완료(1), 설치 중(10) ◦상반기 중 설치 후 집행 예정
	악취 저감시설 설치 지원	577,000	0	237,057	◦신청 완료 후 교부결정 중(2개소) ◦설치 완료 및 보조금 지급(3~5월)
	전기버스 보급사업(공공)	282,000	0	282,000	◦반도체 수급문제로 차량 출고지연으로 미집행
	생태복색관광자원 개발(전환)	800,000	86,995	489,159	◦기본 및 실시설계 : 3월~7월 ◦공사추진 : 8월~12월
	생태하천복원 사업(전환)	2,174,000	892,988	481,242	◦2차분 공사추진 : 3월~8월
	방치폐기물 처리	133,394	15,500	117,894	◦(주)대방신재생에너지 방치폐기물 처리용역 입찰공고 : 3월중 ◦방치폐기물 처리 : 3월∼6월 ◦용역완료 예정일 : 6월중
	공동집하장 확충 지원사업 지원	75,000	48,319	24,949	◦설치 장소 선정 완료 : 2월 ◦공사(설치) 추진완료 : 5월
	재활용 불가폐기물 처리지원	149,000	0	149,000	◦대산매립장 재활용 파쇄창고 화재(`22.2.21.)로 인한 재활용불가 영농폐기물 전량소실 ⇒ 전북도 예산 반납 요구 ◦상반기 수집량을 토대로, 하반기 예산 추가 재배정 예정 (도 환경보전과)
	생활폐기물거점 배출시설 설치지원	85,000	60,000	25,000	◦사업 대상지 선정 : 2월 - 아영 율동마을 ◦실시설계용역 추진 : 3월 ◦율동 마을 만들기 사업 추진완료 (농어촌공사) : 6월 ◦공사(설치) 추진 완료 : 7월
	탄소중립 실현 재활용 시범사업	275,000	0	275,000	◦종합계획수립 : 2월 ◦재활용장터 거점시설설치 추진 : 3 ~ 6월
사고	소 계	16,456,793	12,030,621	2,783,033
	운행경유차 배출가스 저감사업 (경유차DPF, 엔진교체)	2,078,112	1,461,558	317,834	◦경유차 DPF, 건설기계 엔진교체 (67대) - 지급완료 (25대 / 87,393천원) - 상반기 내 장착부착 및 지급 (42대 / 230,441천원)
	전기자동차 구매지원(민간)	7,259,000	6,981,500	200,000	- 지급완료 - 지원대수 : 8대 (화물)
	전기이륜차 보급사업	36,000	29,950	2,600	◦지침 시달 후 시행예정
	소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	1,350,000	862,889	418,602	◦선정검토(1), 설치완료(1), 설치 중(10) ◦상반기 중 설치 후 집행 예정
	악취저감시설 설치지원	577,000	0	339,943	◦악취저감시설 설치 중(4개소) ◦설치 완료 및 보조금 지급(~4월)
	생태녹색관광자원 개발(전환)	1,152,000	123,099	544,439	◦백두대간 에코정원 조성 사업 - 공사준공(1차분) : 6. 14.
	생태하천복원 사업(전환)	2,166,200	892,988	799,771	◦2차분 공사 재착공 : 2월중 ◦2차분 공사준공 : 8. 24.
	매립장 운영	404,000	282,756	121,244	【 소각시설 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 : 19,700천원 】 ◦소각시설 입지선정 : 3 ~ 4월 ◦용역 완료 : 6월 【 대산매립장 주변지역 환경상 영향조사용역 : 61,818천원 】 ◦겨울철 영향 조사실시 : `21. 12월 ◦여름철 영향조사 추진 : 7월 ◦용역 완료 : 8월 【 생활폐기물 성상조사 분석 용역 : 39,726천원 】 ◦시료채취 완료 : 2월 ◦조사 분석 추진 : 3월 ◦용역 완료 : 4월
	폐기물처리시설 확충	1,434,481	1,395,881	38,600	【 생활폐기물 매립량 최소화 방안 검토용역 : 18,900천원 】 ◦용역완료 : 4월 【 음식물류 폐기물 발생 억제 계획 수립 용역 : 19,700천원 】 ◦용역완료 : 4월