안 전 재 난 과

대곡 풍수해생활권 종합정비사업

【공모사업, 국고보조】

□ 필 요 성

◦ 요천의 배수위 영향과 대곡천 및 주거지역의 통수능력 부족으로 상습 침수피해가 발생하는 지역으로 근원적인 침수방지대책 수립 필요.

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 제천리 1133-166번지 일원

◦ 사업기간 : 2023 ~ 2026년(4년)

◦ 사업내용 : 지방하천정비 1.2km, 배수로 및 우수관거 정비 4.54km, 배수펌프장 설치 2개소 교량 1개소 등

◦ 총사업비 : 416억원(국비 208, 도비 83, 시비 125)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	416.00	0.00	0.00	56.00	360.00
국 비	208.00			28	180
도 비	83.00			11.2	71.8
시 비	125.00			16.8	108.2
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 대곡지구 자연재해위험지구 지정 고시           : 2022. 1. 24.

◦ 신규사업 대상지 사업계획서 제출(시->도)        : 2022. 1. 27.

◦ 공모사업 추진을 위한 전북도 컨설팅            : 2022. 2. 22.

□ 금후계획

◦ 공모사업 신청서 제출(시->도)                  : 2022. 3. 31.

◦ 전북도 우선순위선정 제출(전북도->행안부)     : 2022. 4.  7.

◦ 행정안전부 심사 평가(□서류□발표□현장)       : 2022. 4. 12. ~ 29.

◦ 공모사업 대상지 확정                        : 2022. 5 ~ 9월

주촌 자연재해위험지구 종합정비사업

【국고보조】

□ 필 요 성

◦ 주촌천 하류부 주거지 밀집구간은 요천본류 수위상승 시 홍수에 매우 취약하여 침수피해의 근원적인 침수방지대책 수립을 위한 종합정비사업이 필요.

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 노암동 590번지 일원

◦ 사업기간 : 2024 ~ 2026년(3년)

◦ 사업내용 : 배수펌프장 2개소, 주촌천 보축 L=0.14m, 교량재가설 5개소등

◦ 총사업비 : 200억원(국비 100, 도비 40, 시비 60)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
국 비	100.00				100
도 비	40.00				40
시 비	60.00				60
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 자연재해위험 개선지구 타당성조사 및 기본계획 수립용역 추진  : 2021. 8. 5.

□ 금후계획

◦ 행정안전부 전문가 검토                         : 2022.  4월

◦ 자연재해위험개선지구 지정□고시                 : 2022.  6월

◦ 2023년 재해위험지구 사업 반영 건의             : 2022.  7월

◦ 신규사업 확정                                  : 2022. 12월(예정)

사석지구 풍수해생활권 종합정비사업

【국고보조】

□ 필 요 성

◦ 섬진강 계획홍수위 보다 낮은 저지대로 수위 상승 시 내수배제 불량으로 인한 침수피해 발생

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 대강면 사석리 2112번지 일원

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2025년(4년)

◦ 사업내용 : 지방하천정비(L=2.4km, 교량 1개소), 소하천 2개소, 배수펌프장 3개소 등

◦ 총사업비 : 456억원(국비 228, 도비 91, 시비 137)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	456.00	0.00	19.30	218.36	218.34
국 비	228.00		9.65	109.18	109.17
도 비	91.20		3.86	43.67	43.67
시 비	136.80		5.79	65.51	65.50
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 자연재해위험 개선지구 지정 고시            : 2021. 7. 27.

◦ 공모사업 확정 및 ‘22년 예산 가내시        : 2021. 9. 15.

◦ 기본 및 실시설계용역 입찰공고              : 2022. 1. 26.

□ 금후계획

◦ 가격입찰 낙찰자 선정 및 계약               : 2022. 3월

◦ 기본 및 실시설계 추진                      : 2022. 3 ~ 2023.  8월

◦ 공사 시행                                  : 2023. 8 ~ 2025. 12월

유암지구 재해위험 개선지구 정비사업

【국고보조】

□ 필 요 성

◦ 홍수 발생시 소하천 미개수 및 하폭 부족으로 주택□농경지 침수피해가 상습적으로 발생

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 수지면 산정리 388-3번지 일원

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2023년(2년)

◦ 사업내용 : 축제 L=1,000m, 교량 재가설 3개소 등

◦ 총사업비 : 26억원(국비 13, 도비 5, 시비 8)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	26.30	0.00	1.30	12.50	12.50
국 비	13.15		0.65	6.25	6.25
도 비	5.26		0.26	2.5	2.5
시 비	7.89		0.39	3.75	3.75
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 지구지정 타당성 조사 용역 완료             : 2021. 8. 12.

◦ 행정예고                                   : 2021. 8. 17. ~  9. 5.

◦ 지정고시                                   : 2021. 9.  6.

◦ 기본 및 실시설계용역 입찰공고              : 2022. 1. 25.

□ 금후계획

◦ 가격입찰 낙찰자 선정 및 계약               : 2022. 3월

◦ 기본 및 실시설계 추진                      : 2022. 3 ~ 8월

◦ 공사 시행                                  : 2022. 8 ~ 2023. 12월

풍촌지구 재해위험 개선지구 정비사업

【국고보조】

□ 필 요 성

◦ 풍촌천의 하폭이 협소하고 하천내 시설물의 설계기준에 미달되어 집중호우시 제방 월류에 의한 주거지 및 농경지 피해발생

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 대산면 풍촌리 873번지 일원

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2023년(3년)

◦ 사업내용 : 재방 정비 L=2,640m, 교량 재가설 5개소 등

◦ 총사업비 : 95억원(국비 48, 도비 19, 시비 28, 기타   )

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	95.02	4.43	29.10	30.75	30.74
국 비	47.51	1.4	14.55	15.78	15.78
도 비	19.00	0.56	5.82	6.31	6.31
시 비	28.51	2.47	8.73	8.66	8.65
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 문화재 지표조사 용역 착수                : 2021. 8. 10.

◦ 소규모 환경영향평가 용역 착수            : 2021. 8. 30.

◦ 주민설명회 개최                          : 2021. 9.  9.

◦ 실시설계용역(2차분) 완료                  : 2021. 11. 15.

□ 금후계획

◦ 사전 설계검토 추진(행안부)                : 2022. 3월

◦ 건설기술 심의                            : 2022. 4월

◦ 공사 시행                                : 2022. 5월