환 경 과

백암천 생태하천 복원사업

【균특·신규】

□ 필 요 성

◦ 훼손된 수생태계의 건강성을 회복하기 위한 목적으로 훼손 이전과 유사한 수생태계 또는 변화한 여건에 적합한 기능을 수행하는 대체 수생태계 조성

◦ 관내 지방 하천 백암천을 생태하천으로 복원하여 지역주민의 정서함양 및 하천문화를 위한 공간계획, 환경개선 및 보전을 위한 생태계획 수립

□ 개    요

◦ 위    치 : 백암천 일원

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년)

◦ 사업내용 : 생태하천 복원 L=4km (습지조성, 비점오염원 유입차단시설 설치, 생태이동통로 조성, 하천 내 생물서식공간 확보 등)

◦ 총사업비 : 196억원(국비 98, 시비 98)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	196.00	0.00	0.00	8.00	188.00
국 비	98.00			4.00	94.00
도 비	0.00
시 비	98.00			4.00	94.00
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 생태하천 복원계획 수립 용역 추진	: 2022. 2. ~ 8.

□ 금후계획

◦ 백암천 복원계획 사전심의(전북지방환경청)	: 2022. 7.

◦ 2023년 생태하천 복원사업 계획서 제출(전북도)	: 2022. 10.

◦ 생태하천 복원사업 기본 및 실시설계 용역 추진	: 2023. 1. ~ 12.

◦ 백암천 생태하천 복원사업 공사 추진	: 2024. 1. ~ 2026. 12.

향교공원~광치천 도시생태축 복원사업

【국고보조·계속】

□ 필 요 성

◦ 향교공원 그린축(도시공원)과 광치천 수생태축(광치천) 연결을 강화하여 도시지역의 생물 다양성을 증진

◦ 광치천 생태하천복원사업과 연계한 도시생태계 개선을 통해 생물 서식공간 확보 및 도시민에게 생태체험공간 제공

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 용정동 산116-1번지 일원 (면적:42,412㎡)

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년(3년)

◦ 사업내용 : 생태이동통로, 생태숲, 생태탐방로, 생물서식환경조성, 체험학습공간 조성

◦ 총사업비 : 60억원(국비 42, 시비 18)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	60.00	0.00	6.00	18.00	36.00
국 비	42.00		4.20	12.60	25.20
도 비	0.00
시 비	18.00		1.80	5.40	10.80
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 2022년도 환경부 국고보조사업(도시생태축 복원사업) 신청 : 2021. 3.

◦ 2022년도 사업대상지 선정	: 2021. 9.

◦ 중기지방재정계획 및 재정 투자심사 등	: 2022. 1.

□ 금후계획

◦ 기본 및 실시설계용역 발주(협상에 의한 계약)	: 2022. 3.

백두대간 생태관광벨트 조성

【균특·계속】

□ 필 요 성

◦ 백두대간 생태교육장 전시관을 중심으로 운봉읍 일원의 우수한 생태자원을 개발□이용하여 지역브랜드 가치향상과 관광 활성화

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍 주촌리 일원(백두대간 생태교육장 전시관)

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2024년(9년)

◦ 사업내용 : 생태관찰□체험 및 휴양시설 등

◦ 총사업비 : 73억원(국비 19.5, 도비35.5, 시비 18)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	73.00	44.00	8.00	8.00	13.00
국 비	19.50	19.50
도 비	35.50	13.75	6.00	6.00	9.75
시 비	18.00	10.75	2.00	2.00	3.25
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 에코롯지 조성	: 2016. 2. ~ 2017. 5.

◦ 생태관광 탐방로 조성	: 2017. 1. ~ 2017. 12.

◦ 생물테마 전시체험시설 조성	: 2018. 3. ~ 2020. 12.

◦ 백두대간 에코정원 조성사업(1차분) 공사추진  : 2021. 12. ~ 2022. 6.

□ 금후계획

◦ 백두대간 에코정원 조성사업(2차분) 실시설계 용역 착수   : 2022. 3.

생활폐기물 소각시설 설치사업

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦ 2030년도부터 직매립 금지에 따라, 단순 매립방식에서 벗어나 지속

가능한 폐기물 처리체계 구축 필요(소각시설)

◦ 우리시 생활폐기물 중 선별된 재활용품 외 전량 매립처리하는 실정

으로, 매립 의존도가 높음 ⇒ 매립장 사용 조기 완료 우려

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 일원

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2026 (6개년)

◦ 사업내용 : 소각시설 설치 1식[100톤/일 (가동일수 315일/년)]

- 남원시 60톤, 순창군 10톤, 순환형 매립 30톤

◦ 총사업비 : 623.8억원(국비 222.5, 남원시비 280.9, 순창군비 120.4)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	623.80	0.00	0.00	10.00	613.80
국 비	222.50	-	-	5.0	217.5
시․군비	401.30	-	-	5.0	396.3

□ 추진상황

◦ 소각시설 설치 타당성조사 및 기본계획 수립 용역  : `21. 7. ~ `22. 3.

◦ 소각시설 광역 추진 관련 남원시․순창군 협의 추진  : `21. 11. ~ 12.

- 광역 추진 및 지방비 분담 비율 결정(남원 7 : 순창 3)
◦ 입지선정계획 결정․공고 추진(1차 ~ 3차)           : `21. 12. 08. ~

□ 금후계획

◦ 생활폐기물 소각시설 설치 예정지 공모 및 선정   : `22.

- 희망지역 접수 → 입지선정위원회 구성 → 입지타당성조사 및 전략환경영향평가

◦ 국비신청, 지방재정 투자심사 등                 : `22.

◦ 기본 및 실시설계용역 추진                     : `23.

◦ 시설공사 추진                                 : `24. ~ `26.