건 설 과

국도·국지도 건설 5개년 사업

【국가사업, 계속】

□ 필 요 성

◦ 도로망 개선으로 관광 인프라 구축 등 지역개발을 촉진하고 지속적으로 증가하는 교통량에 따른 시설 개량 필요

◦ 도로폭 협소 및 급커브 등에 의한 교통안전사고 예방 및 주민교통편익 도모

□ 개    요

◦ 사업개요

구 분	사 업 명	연장(㎞)	총사업비 (억원)	비 고
합 계	4개 사업	21.8	2,320	비 예타 시설개량 3 예타 위험도 1
소 계	2개 사업	8.9	926
국 도	국도 24호선(이백 ~ 운봉) 2차로 개량	4.9	480	시설개량 (비 예․타)
	국도 24호선(대강 ~ 대산) 2차로 개량	4.0	446	시설개량 (비 예․타)
소 계	2개 사업	12.9	1,394
국지도	국지도 60호선(주천 호경 ~ 고기) 2차로 개량	5.9	941	시설개량 (위험도 평가)
	국지도 37호선(인월 ~ 아영) 2차로 확장 및 개량	7.0	453	시설개량 (비 예․타)

◦ 총사업비 : 2,320억원(국비 1,883, 도비 437)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	2,320.00	2.57	16.43	13.99	2,287.01
국 비	1,883.00	2.57	16.43	13.99	1,850.01
도 비	437.00	-	-	-	437.00
시 비	0.00	-	-	-	-
기 타	0.00	-	-	-	-

□ 추진상황

◦ 제5차 국도․국지도 건설 5개년 계획 반영 추진       : ‵18. 1. ~

◦ 제1차 대상지 사업 선정(국토부) / 5개사업           : ‵20. 1.

◦ 일괄 예비 타당성 조사 추진(기재부, KDI)            : ‵20. 2. ~ ‵21. 9.

◦ 제5차 국도․국지도 건설 계획 확정 고시(국토부)      : ‵21. 10. 1.

◦ 국지도 60호선(주천~호경 고기) 설계용역 시행 / 33억원   : ‵21. 11. ~ ‵23. 12.

□ 금후계획

◦ 국도 24호선(이백~운봉) 실시설계용역 발주 / 14억원  : ‵22. 4.

◦ 미착수 사업 실시설계용역 조기착수 지속 건의       : ‵22. ~

- 국도 24호선(대강~대산), 국지도 37호선(인월~아영)

위임국도 13호 남원 대강 수홍 오르막차로 설치공사

【국가사업·계속】

□ 필 요 성

◦ 도로폭 협소로 의한 교통안전사고 예방 및 주민교통편익 도모

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 대강면 수홍리 773-3번지(수홍 보건 진료소) 일원

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업내용 : 오르막차로 개선 L=1.3km

◦ 총사업비 : 60억원(국비)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	60.00	0.00	20.00	40.00	0.00
국 비	60.00		20	40
도 비	0.00
시 비	0.00
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 설계용역 용역 발주	: ’21. 6.

◦ 주민설명회 개최	: ’21. 10.

◦ ‘22년 사업비 1차 내시(200백만원)                  : ’22. 1.

□ 금후계획

◦ 보상 및 사업 추진	: ’22. 5. ~