농촌활력과

□ 2021년도 명시․사고 이월사업 추진상황

(단위 : 천원)

구분	사 업 명	예산액	집행액	이월액	추진상황 및 금후계획
총 합 계		8,402,376	4,128,034	4,255,870
명시	소 계	6,875,788	3,654,189	3,221,599
	소규모삶터 조성지원사업	98,560	53,686	44,874	◦추진상황 - 읍면동 수요조사 제출요청 : ‘22.1. 13. ◦금후계획 - 대상지 선정, 사업 추진 : ‘22. 11.까지
	마을만들기 자율개발사업 (운봉소석)	357,408	318,555	38,853	◦추진상황 - 경관개선사업시행 및 준공 : `21.11. ◦금후계획 - 잔여 사업 공사 시행 : `22.3~4.
	마을만들기 자율개발사업 (수지등동)	367,336	348,332	19,004	◦추진상황 - 마을만들기사업시행 및 준공 : `21.11. - 옹벽블럭 설치 공사 시행 : `22.2. ◦금후계획 - 옹벽블럭 설치 공사 준공 : `22.3.
	마을만들기 자율개발사업 (주생정충)	367,336	338,988	28,348	◦추진상황 - 주생면 예산 재배정 : ‘22.2 ◦금후계획 - 광장 포장 공사 시행 : ‘22.3.~4.
	마을만들기 자율개발사업 (대강가덕)	367,336	313,466	53,870	◦추진상황 - 잔여사업(편의시설) 실시설계 시행 : `22.2. ◦금후계획 - 비가림, 담벽 설치 공사 시행 :`22. 3.~4.
	마을만들기 자율개발사업 (보절진목)	367,336	322,549	44,787	◦추진상황 - 잔여사업(비가림시설) 실시설계 시행 : `22. 2. ◦금후계획 - 잔여공사 시행 : `22. 4.
	마을만들기 자율개발사업 (아영매산)	347,480	323,586	23,894	◦추진상황 - 태양광발전장치 설치 실시설계 시행 :`22. 2. ◦금후계획 - 잔여공사 시행 : `22. 4.
	마을만들기 자율개발사업 (주천행정)	79,424	23,579	55,845	◦추진상황 - 실시설계 용역 시행 : `21.6. ◦금후계획 - 시설공사 시행 : `22.3.
	마을만들기 자율개발사업 (주생유매)	79,424	22,750	56,674	◦추진상황 - 실시설계 용역 시행 : `21.7. ◦금후계획 - 시설공사 시행 : `22.3.
	마을만들기 자율개발사업 (대강강석)	79,424	23,528	55,896	◦추진상황 - 실시설계 용역 시행 : `21.6. ◦금후계획 - 시설공사 시행 : `22.3.
	마을만들기 자율개발사업 (대강입암)	79,424	23,550	55,874	◦추진상황 - 실시설계 용역 시행 : `21.6. ◦금후계획 - 시설공사 시행 : `22.3.
	마을만들기 자율개발사업 (대산감성)	79,424	21,925	57,499	◦추진상황 - 실시설계 용역 시행 : `21.4. ◦금후계획 - 시설공사 시행 : `22.3.
	마을만들기 자율개발사업 (덕과사곡)	79,424	20,845	58,579	◦추진상황 - 실시설계 용역 시행 : `21.4. ◦금후계획 - 시설공사 시행 : `22.3.
	마을만들기 자율개발사업 (인월외건)	79,424	22,957	56,467	◦추진상황 - 실시설계 용역 시행 : `21.6. ◦금후계획 - 시설공사 시행 : `22.3.
	마을만들기 자율개발사업 (아영청계)	79,424	23,377	56,047	◦추진상황 - 실시설계 용역 시행 : `21.5. ◦금후계획 - 시설공사 시행 : `22.3.
	마을만들기 자율개발사업 (도통갈치)	79,424	23,467	55,957	◦추진상황 - 실시설계 용역 시행 : `21.6. ◦금후계획 - 시설공사 시행 : `22.4.
	기초생활인프라 (농촌생활환경정비)	595,680	565,205	30,475	◦추진상황 - 농촌생활환경정비사업 시행 및 준공 : `21.12. ◦금후계획 - 실시설계 용역 추진 : `22.7.
	농촌 신활력 플러스 사업	1,904,000	675,974	1,228,026	◦추진상황 - 공유작업장 실시설계 완료: ‘22.2 ◦금후계획 - 공유작업장 공사 시행 : ‘22.3.~7.
	시군역량강화	241,000	187,870	53,130	◦추진상황 - 세부사업계획 수립 ◦금후계획 - 보조금 교부결정 :‘22.3월중 - 연내 사업완료 예정
	추어식품클러스터 육성사업	1,147,500	-	1,147,500	◦추진상황 - 추어식품산업 클러스터 사업단 구성 및 인력 채용계획 수립 : `22. 2. 8. - 사업단 직원 채용공고 : `22. 2. 18. ~ 2. 24. [사업단장 1, 사무국장 1, 사무원 1] - 직원 채용 면접 : ‘22. 3. 3. - 최종 합격자 계약서 작성 및 사업장 배치 : ‘22. 3. 10. ◦금후계획 - 사단법인 설립 후 사업 추진 : ‘22. 3.
사고	합 계	1,526,588	473,845	1,034,271
	테마가 있는 자연마을 조성사업	480,000	391,023	70,505	◦추진상황 - 보조금 지급(51,000천원) ◦금후계획 - 3월중 사업완료 예정
	2021년 전북형 농촌관광 운영활성화 사업	17,000	-	17,000	◦사업완료
	수동마을 우물 정비사업	48,833	-	48,833	◦추진상황 - 실시설계 용역 시행 : `21.10. - 우물 정비공사 시행 : `21.11. - 우물 정비공사 중지 : `21.12. ◦금후계획 - 우물 정비공사 준공 : `22.4.
	가덕 마을만들기 사업(건축공사)	257,078	74,000	183,078	◦추진상황 - 건축공사 준공 : `22.1. - 건축공사 대금 지급 : `22.1.
	가덕 마을만들기 사업(전기공사)	23,436	-	23,436	◦추진상황 - 건축공사 준공 : `22.1. - 건축공사 대금 지급 : `22.1.
	가덕 마을만들기 사업(통신공사)	9,010	-	9,010	◦추진상황 - 건축공사 준공 : `22.1. - 건축공사 대금 지급 : `22.1.
	가덕 마을만들기사업 (건축공사) 관급자재 레미콘 구입	24,056	8,822	15,234	◦추진상황 - 대금 지급 : `22.1.
	가덕 마을만들기사업 (건축공사) 관급자재 창호 구입	7,897	-	7,897	◦추진상황 - 대금 지급 : `22.1.
	가덕 마을만들기사업 (건축공사) 관급자재 냉난방기 구입	14,134	-	14,134	◦추진상황 - 대금 지급 : `22.2.
	가덕 마을만들기사업 (건축공사) 건축 감리용역	5,470	-	5,470	◦추진상황 - 준공금 지급 : `22.2.
	등동마을 옹벽블럭 설치 공사 실시설계용역	1,280	-	1,280	◦추진상황 - 준공금 지급 : `22.1.
	남원시 농촌 신활력플러스사업 공유작업장 구축 실시설계 용역	42,779	-	42,779	◦추진상황 - 준공금 지급 : `22.1.
	매산 마을만들기 사업 회관 명판제작설치	3,040	-	3,040	◦추진상황 - 준공금 지급 : `22.2.
	부석 마을만들기 사업 퍼걸러 구입	20,108	-	20,108	◦추진상황 - 송동면 재배정 완료 : `22. 1. - 퍼걸러 설치 완료 : `22. 2. ◦금후계획 - 관급자재 대금 지급 : `22.3.
	갈치마을 마을만들기사업 실시설계 용역	23,467	-	23,467	◦추진상황 - 실시설계 용역 시행 : `21.6. ◦금후계획 - 실시설계 용역 준공 : `22.3..
	전북형 에너지 자립마을 조성사업 보조금 교부결정 (민간자본보조)	81,000	-	81,000	◦추진상황 - 시설공사 완료 : `22. 2월 ◦금후계획 - 준공검사 및 보조금 지급 : `22. 3.
	식품소재 및 반가공산업 육성사업	420,000	-	420,000	◦추진상황 - 착공 보고 : `21. 12. 8. [당초 2월 중 건축공사 완공 예정이었으나, 동절기 사업 추진 어려움으로 사업기간 연장] ◦금후계획 - 사업완료 : `22. 6월 중 - 보조금 지급 : `22. 6월 말
	찾아가는 양조장 사업	48,000	-	48,000	◦추진상황 - 보조금 교부결정 : `21. 8. 31. - 착수 보고 : `21. 11. 2. [프리미엄 막걸리 품목보고에 따른 행정적인 절차가 필요하여 사업기간 연장] ◦금후계획 - 사업완료 : `22. 4. 30. - 보조금 지급 : `22. 5월 중